제 안 요 청 서

사 업 명	국립대구박물관 2021년 하반기 특별전 <한국의 허리띠> 전시홍보관 설치 용역
주관기관	국립대구박물관

2021년 7월

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업책임자	학예연구실장	학예연구실	장용준	TEL: 053)760-8540
사업실무자	학예연구사	학예연구실	윤서경	TEL: 053)760-8567

Ⅰ	사업 개요

1. 사업명

: 국립대구박물관 2021년 하반기 특별전 <한국의 허리띠> 전시홍보관 설치 용역

2. 사업목적

ㅇ 고대에서 현대까지 인간 복식의 필수품으로 존재한 허리띠의 역사를 소개

ㅇ 허리띠 자료(직물, 금속) 등을 바탕으로 당대 의생활을 추정 복원 시도

ㅇ 권력, 신분, 직업 등을 상징하는 주요 허리띠와 허리띠가 지닌 다양한 이야기들을 풀어서 설명

ㅇ 허리띠 집성에서 더 나아가 국민들에게 “복식문화”에 대한 관심 제고

3. 사업개요

가. 시설현황

ㅇ 위치: 대구광역시 수성구 청호로 321 국립대구박물관 기획전시실 Ⅰ, Ⅱ

ㅇ 사업 연면적: 967.5㎡[기획전시실Ⅰ(488.16㎡), Ⅱ(497.34㎡)]

나. 사업범위

ㅇ 전시기획에 따른 전시 연출 실시설계

ㅇ 전시 연출을 위한 구조물 제작 설치(전시장 내부/외부), 철거 포함

ㅇ 전시 진열장 제작 설치(필요시)

ㅇ 전시 받침대(유물 보조대 포함) 제작 설치

ㅇ 전시 내/외부 그래픽제작 설치(텍스트패널, 설명카드, 이미지패널)

ㅇ 전시매체(체험/모형/홍보물/포토존) 제작 설치(필요시)

ㅇ 미디어매체 설치(필요시)

ㅇ 전기 및 조명 등 관련 설비 설치

ㅇ 기타 사업에 수반되는 행정 소요 및 우리 관 요구사항

다. 사업기간

ㅇ 계약체결일로부터 2021년 11월 22일 월요일(철거 및 원상복구 포함)까지

ㅇ 전시 기간: 2021년 11월 23일(화) ~ 2022년 3월 27일(일)

ㅇ 개막일(전시장조성): 2021년 11월 22일(월)

① 용역 발주 및 계약: 2021. 7. ~ 8.

② 기획 및 설계 : 2021. 8. ~ 11.

③ 전시물 제작 설치 : 2021. 10. ~ 11.

④ 테스트 및 보완(시범운영) : 2021. 11. 15. (월) ~ 11. 19. (금)

⑤ 지침서 작성(준공서류 및 납품서류): ~ 2021. 11. 22. (월)

⑥ 전시철거 : 2022. 3. 28. (월) 이후 발주처와 협의한 날짜에 시행

라. 사업비

ㅇ 사업예산 : 금240,000,000원(금이억사천만원, 부가가치세 포함)

ㅇ 창작, 전시물 제작 설치, 제세공과금 등 기타부대비용 일체 포함

4. 계약방식

ㅇ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결)에 의함

5. 응모자격

ㅇ 입찰자격 : 입찰공고서에 의함

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서 제출 마감일 전일까지 실내건축공사업(업종코드:0006)으로 입찰참가자격을 등록한 자.

② 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서(“전시홍보관설치서비스”,세부품명번호: 7215409902)를 소지한자.

※ 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야함

③ 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 자

※ 중소기업확인서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

※ 공동수급 불가

6. 제안일정

1	조달청 계약요청 의뢰	2021. 7.
2	입찰공고 게시	입찰공고서 참조
3	제안서 및 입찰서 제출 ※ 현장설명회 없음	입찰공고서 참조

7. 제출서류: 입찰공고서 반드시 참조할 것

① 정성제안서 1식 : 제안서(A3 10매/내용: 설계설명서, 설계도, 예정공정표)

② 정량제안서 1식 : 응모서류 (A4/내용: 서식 1 ~ 서식 5 에 해당하는 응모서류)

※ 제안서 등 제출서류는 나라장터를 통해 전자적으로 제출하여야 하며, 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

Ⅱ	제안 지침

1. 기본지침

가. 기본방향

ㅇ 고대부터 현대까지 인간의 복식품으로 자리 잡은 허리띠를 다양한 각도로 소개해 “복식문화”에서 허리띠가 지닌 기능, 상징적 의미를 관람객이 쉽게 이해할 수 있도록 다양하고 입체적인 미디어·체험물 활용

ㅇ 전시실 내에 진입하기 전, 관람객의 흥미와 기대감을 높일 수 있는 로비나 영상실의 연출 제안

ㅇ 기존 전시 방식인 육안 감상과 차별화될 수 있는 연출을 통해 다양한 문화재와 자료를 제시하여 관람객으로 하여금 정보 습득 과정이 흥미로울 수 있는 연출 제안

ㅇ 아름다운 전시품의 감상과 역사적 내용 전달의 균형이 잘 이루어지도록 연출

나. 일반 지침

ㅇ 전시 목적과 제안 요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장 여건을 고려하여 계획

ㅇ 전시물은 관련 규정 및 제반 규정에 적법하게 제작 설치될 수 있도록 계획

ㅇ 국립박물관의 위상에 맞는 품위 있는 전시 연출계획 수립

ㅇ 공공 문화시설로서 노약자 및 장애자의 편익과 안전성을 도모하는 계획 수립

ㅇ 청소년 단체관람객의 전시실 관람 시 안전성과 교육성이 고려된 계획 수립

ㅇ 기존 각종 설비(전기/통신/방범)의 목적과 기능이 유지되도록 계획

ㅇ 전기공사는 자격증을 보유한 전문가가 시공해야 하며 시공 부주의로 인한 화재 발생 시 모든 책임은 용역 업체에 있음

ㅇ 용역 사업 기간에 발생되는 전기 사용 요금은 관에서 지출한다.

ㅇ 기존 각종 설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 하되, 사전에 발주처와 의논하여 설치하며, 전시 종료 시 원상복구 한다.

2. 세부지침

가. 전시 공간

(1) 공간구성

ㅇ 전시장의 관람 동선은 원활히 하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며 전시실 내부 관람객 휴게 공간을 고려하여 계획(전기배선 고려)

ㅇ 전시 구성에 따른 관련 유물을 참고하여 계획

(2) 전시조명설비

ㅇ 전시물의 전체조명 계획에 따른 트랙조명 설치

ㅇ 집중조명방식이 필요한 전시연출공간은 조명기구 구입·설치(협의)

ㅇ 신규조명 설치 시에는 유물의 종류와 전시기법 등을 고려하여 적정한 시스템을 선택하여야 하며, 연색성과 색온도 등을 계획 시 반영

(3) 색채 구성

ㅇ 전반적인 색채 구성이 전체적인 조화를 이루고 전시주제와 맞도록 구성

나. 전시시설

(1) 전시공간연출

ㅇ 전시실의 천장, 벽, 바닥, 홀 등의 마감 재료는 주위 시설 및 조명에 조화되고 전시물 보존에 적합한 품목을 선정하여 계획

ㅇ 유물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시 자재는 친환경자재를 사용

※ 작품의 안전을 고려해 벽체 및 진열장 구조, 재질이 고려되어야 함

※ 노출전시 필요 시 발주처와 협의가 필요하고, 건축환경(벽체, 벽부장 등)을 고려하여 공간연출 되어야 함(소형작품은 모두 진열장 전시 필수)

※노출시 인제책(작품과의 거리 1,000mm)을 고려 및 보안에 대해서도 제안

※대여 소장처의 환경 기준을 적용해 벽체구조 및 재질이 제작되어야 함

ㅇ 진열장은 기존 진열장을 활용하되, 필요시 임시진열장 제작. 유물 전시를 위한 진열장(의장, 시스템)은 보안, 안전, 밀폐성, 관리의 편리성 등을 최우선으로 고려하여 제작 설치 (진열장 마감 유리는 안전필름 부착 필수)

(2) 전시보조자료(전시대, 받침대) 설치

ㅇ 전시연출에 필요한 받침대, 전시대, 기타 전시 사인물 등은 유물의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출

(3) 연출영상 제작·설치

ㅇ 전시 분위기 및 전시물의 이해를 돕고 흥미를 유발하는 미디어 제작에 활용하는 고화질의 영상장비를 전시장 내에 설치 및 원활한 운영체계 구축

ㅇ 연출영상의 상영을 위한 영상케이블, 전기설비, 거치대, 영상기기 세팅 등 일체이며, 구입 또는 대여하여 활용

(4) 그래픽 및 홍보물

ㅇ 발주처가 사전 공고한 그래픽, 배너리스트를 참고하여 제안하고, 전시설계, 구획설정, 내용전달 등에 따라 스카시·시트커팅·실사 등으로 하며 제작 중 수정·변경 가능

다. 제안 유의사항

ㅇ 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택

ㅇ 제안자는 제출한 제안서에 대해 모든 책임을 지며 과업 중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가 비용은 별도로 계산치 않음

ㅇ 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의해 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재

ㅇ 시설물의 제작․설치 차후 부품교체, 하자보수, 전시장 철거 등 관리유지에 용이하도록 고려하여 제안

ㅇ 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고, 구성과 관련한 기초 자료는 응모자가 조사 및 검토하여야 한다.

※ 별첨자료: 전시기본계획서 / 전시품목록 / 전시실 평면도 / 그래픽·배너리스트 등

3. 제안서 작성 요령   ( * 제안서 용지규격/페이지 등 형식적인 사항은 권고사항임. )

가. 제안서의 작성지침

(1) 제안서에는 제안요청서에서 요구 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 함

(2) 제출된 제안서의 내용은 발주처에서 청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주 함

(3) 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

(4) 응모서류는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성

4. 유의사항

가. 제안서 제출방법은 공고문 참조(나라장터)

나. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

다. 응모자는 제출된 제안서류에 대한 사실여부 등의 책임을 짐

라. 본 사업과 관련된 이의 및 이견이 있을 경우 상호협의 하 결정함

마. 본 사업은 발주처의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며 상호협의하에 결정함

바. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출

사. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 평가함

아. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 함

자. 용역 결과에 따른 산출물의 소유권은 국립대구박물관에 있음

5. 착수 및 완료(결과보고)

가. 전시설계 및 제작은 계약일로부터 3일 이내에 착수해야 한다.

나. 설계보완은 박물관의 최종승인을 받아야 한다.

다. 박물관의 지시에 따라 검토를 마친 뒤 제작·인쇄하고 세부지침서에 따른 결과물을 제출해야 한다.

라. 결과물은 계약 만료일까지 박물관에 제출하여 소정의 검수절차를 거쳐야 한다.

마. 박물관이 결과물에 대해 수정․보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후라도 제작자 부담으로 성실히 수정․보완하여 제출해야 한다.

바. 준공도서 상세내용

ㅇ 설계도서 3부

ㅇ 설명패널, 그래픽 원본 파일 / 홍보물 디자인 원본 파일

ㅇ 내역서 2부

ㅇ 전체 내용 및 기타 본 전시물 제작과 관련한 내용을 수록한 저장매체

6. 제안서 세부내용

구 분	내 용	매 수	비고
정성 제안서	전시컨셉 2. 전시평면 3. 실별 세부연출 4. 전시연출 상세(유물연출, 마감재, 색채, 조명계획 등) 5. 설계에 따른 공정 및 운영관리 ※ 위 내용이 포함되도록 10매 이내로 구성	총 10매 이내 (지정크기A3)

Ⅲ	제안서 평가 및 협상

1. 제안서의 평가

가. 평가위원회 구성

(1) 제안서의 공정한 기술능력평가를 위해 박물관 내․외부의 전문가로 평가위원회를 구성한다.

(2) 평가위원회 위원은 국립대구박물관에서 5인 이내의 관련분야 전문가로 선정한다.

(3) 평가위원회는 제출된 제안서를 심사한다.

(4) 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 공개하지 아니한다.

나. 평가방법

(1) 소정의 기한 내에 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 평가한다.

(2) 평가위원은 평가 시 본 지침의 평가기준을 적용한다.

(3) 평가총점은 80점을 만점으로 하며, 업체에 대한 심사위원 점수의 최고점, 최저점을 제외한 3인의 총계점수를 산술 평균한다.

(4) 산술평균의 값은 소수점 3자리이하에서 사사오입한다.

(5) 동점자의 처리는 기술능력평가 점수가 높은 업체를 우선으로 하며, 기술능력평가도 동일한 경우, 제안서 평가의 항목 중 배점이 큰 항목에서 점수가 높은 업체를 선순위자로 한다.

다. 평가결과 발표

(1) 평가위원회는 심사내용을 기록한 보고서를 작성하여 평가위원 모두가 서명하고, 발주처에서는 그 결과를 조달청에 제출하여야 한다.

(2) 조달청은 제안서 평가점수와 업체평가 점수 및 입찰가격을 종합평가하여 협상적격자를 선정한 후 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 개찰현황을 공고한다.

마. 기타

(1) 제안서 심사결과 및 세부내용에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 응모자는 평가위원 구성, 평가기준, 방법 등에 대해 이의를 제기할 수 없다.

2. 평가항목 및 평가기준

가. 제안서의 평가

ㅇ 제안서의 평가는 총점 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 80점(제안서평가 70점, 사업수행능력평가 10점), 입찰가격 20점으로 배점하여 평가하고, 종합평가 순위에 따라 최우수작으로 선정된 업체를 우선협상대상자로 한다.

나. 기술능력평가(안)

(1) 기술제안서 평가: 70점

평가항목		세부 평가항목	배점
제안서 평가	전시연출 및 공간구성 계획	전시연출 컨셉	10
		실별 공간구성 및 연출의 적정성	10
	세부연출 계획	조명연출 계획 및 적정성	10
		색채 구성의 적정성(공간 및 전시물)	10
		마감재 선정에 따른 창의성 및 적정성	10
	관리 및 운영계획	사업수행 공정 및 수행방법의 타당성	10
		사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성	10
합 계			70

※ 기술능력평가는 별도 PT발표 없이 제안서 평가만 함

(2) 사업수행능력평가: 10점

ㅇ 수행실적

- 배점한도: 5점

평가 항목	평 가 요 소	평 가 방 법		비 고
		기 준	평점
수행 실적	해당 사업 규모 대비 유사용역 실적	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 40%미만	5.0 4.5 4.0 3.5	◎ 유사 용역 - 박물관, 미술관, 전시관 및 민간 관련 실적 가능 ◎ 공고일기준 3년 이내 실적 합산 - 단일4천만원(부가세 포함) 이상 사업에 한함

ㅇ 경영상태

- 배점한도: 5점

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%	5.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%	4.75
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%	4.5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%	3.0

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급의 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2.  신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

다. 입찰가격 평가(조달청 평가) : 20점

구분	주요 평가기준	배점	비고
입찰가격	“법령 기준에 따름”	20

3. 협상과정

가. 협상적격자 및 협상순위결정

ㅇ 기술능력평가점수가 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정

ㅇ 기술능력평가+입찰가격평가점수 결과 고득점 순으로 협상대상자 선정 및 순차적 협상 실시

나. 협상내용과 범위

ㅇ 협상대상자가 제안한 과업내용, 추진일정, 제안(입찰)가격 등 제안서의 내용은 일부 조정을 거쳐 발전시켜 나아갈 계획이므로 최종안과 일치하지 않을 수도 있음.

다. 협상절차

ㅇ 협상대상자가 협상내용에 대하여 합의할 경우, 차 순위 협상대상자와의 협상은 생략함.

ㅇ 협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위 협상대상자와 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬될 경우 순차적으로 차 순위 협상대상자와 협상 실시

4. 저작권 및 사용권

가. 협상대상작

ㅇ 협상대상작에 대하여 타인의 지적 재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 당선자에게 책임이 있음

ㅇ 발주처는 협상 대상작의 수정‧보완 및 변경에 대한 일체의 우선적 권한을 가짐

ㅇ 본 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의함

ㅇ 본 용역수행과 관련한 국가 간, 기관 간의 협약에 의해, 성과물의 사용 및 배포

5. 기 타

가. 상기 기술한 내용 외에 평가관련 사항은 공개하지 아니 함

나. 주최자는 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 응모작 제출자는 평가위원 구성, 평가기준 등에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없음

다. 실적증명은 첨부 양식을 원칙으로 하되 기 발행 받은 것은 1년 이내 시 유효함

라. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함

마. 협상 방법 등 명시되지 않은 사항은 협상에 의한 계약 체결기준을 적용

[서식 1호]

제안사의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

[서식 2호]

실적증명서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립대구박물관
	증명서용도		2021년 하반기 특별전 “한국의 허리띠” 전시홍보관 설치 용역 실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2021년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식 3호]

사업수행 실적 집계표

구 분	사업 명		사업 기 간	준공금액	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
①최대실적 (1건)
	소 계
②기타 실적
	소 계
합 계 (①+②)

[서식 4호]

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다

교부일: 2021.    .    .

신용평가기관:                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식 5호] 기술능력 제안서표지양식 (참고용)

실크로드

1. 표지크기: A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 굴림체, 흑색사용

4. 글자크기: 제목 30, 72호, 날짜 20호, 식별번호 22호

국립대구박물관 2021년 하반기 특별전 “한국의 허리띠”

전시홍보관 설치 용역 제안서

5. 좌우간격은 중앙 정렬함