제 안 요 청 서

고려인 기증 특별전 <까레이즈, 고려사람> 전시연출용역

2022. 07.

구분	직책	소속	성명	연락처
사업책임자	학예연구관	전시운영과	정연학	02)3704-3152	yonhak@korea.kr
사업실무자	학예연구사	전시운영과	이보라	02)3704-3172	bora1014@korea.kr

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명

○ 고려인 기증 특별전 <까레이즈, 고려사람> 전시연출용역

ㅇ 전 시 명 : 까레이즈Корейцы, 고려사람(가제)

ㅇ 전시기간 : 2022. 9. 7.(수)~11. 7.(월) (※ 개막식: 2022. 9. 6. 예정)

ㅇ 전시장소 : 국립민속박물관 기획전시실 II

ㅇ 전시내용 : 중앙아시아 고려인 삶과 일상 관련 사진(352점) 및 관련 자료 등

2. 사업목적

ㅇ‘빅토르 안’기증 사진을 통한 중앙아시아 고려인의 삶과 문화 조명

ㅇ 국립민속박물관 확대·이전건립 대비 상설전시“디아스포라와 세계민속 이주 한인의 삶”대비 사전 준비

3. 사업개요

가. 시설현황 및 사업 연면적

ㅇ 위   치 : 서울시 종로구 삼청로 37 국립민속박물관 기획전시실 II

ㅇ 면   적 : 약 142㎡(약42평)

나. 사업범위

ㅇ 전시 기획에 따른 전시장 디자인 및 조성(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

ㅇ 전시연출을 위한 구조물 및 가구류 제작 설치, 철거 포함

ㅇ 전시 진열장 및 받침대 제작·설치

ㅇ 전시 패널 및 설명 카드 등 제작·설치

ㅇ 전시 연출물 및 연출영상 제작·설치
ㅇ 파사드 및 출구 이미지 월 제작·설치

ㅇ 전기 및 조명 등 관련 설비 설치

ㅇ 기타 사업에 수반되는 행정소요 및 우리관 요구사항

다. 사업기간 : 계약체결일로부터 2022. 11. 11.(금)까지

※ 전시 종료 후 철거 및 원상복구 포함

※ 전시기간 : 2022. 9. 7.(수)~11. 7.(월) / 개막식: 2022. 9. 6.(화)

- 디자인 : 2022. 6.~7월

- 전시물 제작 설치 : 2022. 8월

- 전시품 디스플레이 : 2022. 9. 1. ~ 9. 2.

- 전시실 시험운영 및 최종 점검 : 2022. 9. 3. ~ 9. 5.

- 전시개막(전시장조성완료) : 2022. 9. 6.(화)

- 지침서 작성(준공서류 및 납품서류) : ~ 2022. 11. 11.

- 전시물 철거 및 원상복구 : 2022. 11. 8. ~ 11. 11.

※ 유물 디스플레이 기간 전까지 전시물 반입 가능한 전시환경이 마련되어야 함

(준공청소 포함 거의 모든 공정 완료)

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 전시 철거 시 까지

라. 사업예산 : 75,000,000원(금칠천오백만원, 부가가치세 포함)

※ 창작, 전시물 제작․설치, 제세공과금 등 기타부대비용 일체 포함

마. 당선작 대우 : 설계 및 제작․설치권 부여

4. 입찰 및 낙찰자 결정방법

ㅇ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약)에 의함

5. 입찰자격 : 입찰공고에 따름

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조의    자격요건을 갖춘 사업자

ㅇ「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」   제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중․소기업․소상공인확인서(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

ㅇ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 기타자유업(행사대행업)(업종코드 : 9901)을 등록한 자

ㅇ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 의한 직접생산확인증명서(세부품명: 전시회기획 및 대행서비스)를 소지한 자

ㅇ 단독 또는 공동계약(공동이행방식)이 가능.

6. 제안일정

1) 조달청 계약의뢰: 2022. 06.

2) 입찰공고 게시: 입찰공고서 참조

3) 제안서 및 입찰서 제출: 입찰공고서 참조 (※ 현장설명회 없음)

4) 제안서 평가: 제안서 접수 마감일로부터 10일 이내

※ 제안서 PT를 요구할 수도 있음 (파워포인트 사용 30분 이내)

5) 상기 일정은 조달청과 협의 및 진행 과정에서 달라질 수 있음.

7. 제출서류

가. 제출요령

1) 제안서는 마감시간까지 e-발주시스템을 통해 제출해야 하며, 반드시 나라장터 또는 e-발주시스템에서 제안서 최종제출 여부를 확인하고, 최종적으로 제출한 파일을 다운로드하여 정상여부를 확인하여야 한다.

2) 각 제안사는 1개의 제안서만을 제출할 수 있다.

3) 모든 서류에는 규정에 의한 것 이외의 표시를 금한다. 동 사항을 위반하여 심사위원회에서 불공정행위로 의결될 경우 실격처리 될 수 있다.

나. 제출서류 : 입찰공고서 반드시 참조

① 기술제안서 / 발표자료(A3 15매 / 내용: 설계설명서, 설계도, 예정공정표) 각 1식

② 입찰참가자격 확인서류(A4 / 내용 : 서식2-서식16에 해당하는 응모서류) 1식

※ 제안서 등 제출서류는 나라장터를 통해 전자적으로 제출하여야 하며, 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

Ⅱ. 제안지침

1. 기본지침

가. 기본방향

1) 본 사업인 고려인 기증 특별전 <까레이즈, 고려사람>은 스토리텔링을 기반으로 기증 사진 및 관련 자료 등을 전시하는 것으로, 전시물이 돋보이는 효과적인 디스플레이 방식으로 공간을 구성한다.

2) 공간+조명+이미지+아트워크 등 다양한 매체를 적절하게 활용하여 기증 사진 자료를 중심으로 공감각적 경험이 가능하도록 계획한다.

3) 시각 자료 뿐만 아니라, 입체적·실험적 전시기법을 활용하여 각 부 공간이 다채롭고 흥미롭게 구성될 수 있도록 계획한다.

4) 전시시설물 설치 시 박물관 전시실의 기본구조가 훼손되지 않는 공법을 사용한다.

5) 전시물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 포름알데히드가 거의 검출되지 않는 최상급 친환경자재를 사용하며, EU기준 이상을 사용해야 한다. 또한, 필요 시 진열장 내부에 광촉매 시공을 하며, 방염 및 방충처리를 반드시 해야 한다.

6) 전시철거 시 원상복구를 하며, 필요시 전시실 도색을 한다.

나. 일반지침

1) 본 사업의 목적과 제안요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장여건을 고려하여 계획.

2) 전시물은 관련규정 및 제반규정에 적법하게 제작․설치될 수 있도록 계획.

3) 국립박물관의 위상에 맞는 품위 있는 전시연출계획 수립.

4) 공공문화시설로서 노약자 및 장애자의 편익과 안전성을 도모하는 계획 수립.

5) 청소년 단체관람객의 전시실 관람시 안정성과 교육성이 고려된 계획 수립.

6) 외국인의 관람 편의성이 고려된 계획 수립.

7) 전시물은 예술성, 창작성, 통일성, 기능성을 충족하고 쾌적한 관람환경이 될 수 있도록 계획 수립.

8) 기존 각종 설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 계획.

9) 전기공사는 자격증을 보유한 전문가가 시공을 해야 하며 시공 부주의로 인한 화재발생시 모든 책임은 공사업체에 있음.

10) 제작·설치 2주 전 전기면허가 있는 업체를 통해 전기배선도면 및 소방도면 제출.

2. 세부지침

가. 전시공간

1) 공간구성

ㅇ 공간구성은 전시 기획(안)을 참고하고 전시물 설치에 필요한 디스플레이 방법, 보조물 등 모든 제반 사항을 고려한다.

ㅇ 전시장의 관람동선은 원활하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며, 전시실 내부 관람객 휴게공간을 고려하여 계획되어야 한다.(전기배선 고려)

ㅇ 전시성격에 맞추어 설명패널, 레이블 및 전시보조물을 적절하게 계획한다.

2) 색채 및 패널 구성

ㅇ 전반적인 색채구성이 상호 연계성과 차별성이 강조되면서도 전체적 조화를 이루어야 하며, 친환경 자재를 사용한다.

ㅇ 패널류는 서체 사용 저작권 등 문제가 일어나지 않도록 한다.

3) 전시조명설비

ㅇ 전시물의 전체조명 및 집중 조명에 적합한 조명배치와 조명기구를 계획 설치한다.

ㅇ 신규조명 설치 시에는 유물의 종류, 박물관 기존 설비 및 전시기법 등을 고려하여  적정한 시스템을 선택(구입 혹은 대여)하여야 하며, 연색성과 색온도 등을 계획 시 반영한다. (framer 혹은 고보 타입 등 포함)

나. 전시시설물

1) 일반사항

ㅇ 전시실 천장, 벽, 바닥, 파티션, 진열장 설치대 등의 마감 재료 및 디자인은 주위시설 및 조명과의 조화, 유물의 안정적 거치 및 보존, 유지 관리의 용이성, 변질 방지 등이 최대한 보장되도록 설계되어야 하며, 수시로 채색과 보수 등 현상 변동을 필요로 하는 설계는 지양한다.

ㅇ 전시물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 친환경 자재를 사용한다.

※ 전시물의 안전을 고려해 벽체 및 전시대 구조, 재질이 고려되어야 함

※ 노출전시 필요시 발주처와 협의가 필요하고, 건축환경을 고려하여 공간연출 되어야 함(소형작품은 모두 진열장 전시 필수)

※ 대여 소장처의 환경 기준을 적용해 구조 및 재질이 제작되어야 함

ㅇ 전시물의 제작·설치는 보수, 철거 등 유지관리에 용이한 방식을 제안해야 함

2) 구조물 및 전시대

ㅇ 구조물 및 전시대 계획 시 전시효과와 전시물 보호 기능(보안, 안전, 관리의 편리성 등)을 충족시킬 수 있도록 설계하되 전시공간과 조화되도록 제작한다.

ㅇ 전시실 파티션, 전시대 등에 설치되는 유리는 파손시 비산되지 않도록 접합유리를 사용하거나, 비산방지필름(안전필름)을 부착한다.

3) 전시보조물(받침대, 패널 등) 설치

ㅇ 전시연출에 필요한 받침대, 패널, 연출물, 설명카드 등은 유물의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출한다.

ㅇ 전시물의 안정적이고 무해한 거치․보존 및 시각 효과와 유지관리의 용이성, 내구성 등을 보장하도록 재질 및 형태, 색채 등이 설계되어야 한다.

4) 연출영상물 세팅

ㅇ 연출영상물은 전시를 보완하는 내용으로, 최신 기법을 통한 안정적이고 효과적인설비와 구성이 되도록 계획되어야 한다.

ㅇ 영상물 세팅 : 영상케이블, 전기설비, 거치대, 영상 셋팅 등 일체

※ 연출영상물 관련 H/W, S/W는 업체에서 구입 또는 대여한다. (* 필요 시 국립민속박물관 보유 빔 프로젝터, PC 등의 장비 사용 가능)

다. 제안 유의사항

1) 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

2) 제안자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공도중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계상치 않는다.

3) 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

4) 추후에 계약으로 확정된 공사금액에 대한 내역 작성 시, 인건비는 시중노임단가를, 자재 및 재료비는 조달청 발행 가격정보 최근호에 의하되 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용한다. 그 외의 미수록 단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용한다.(공인된 원가계산기관의 원가계산도 가능함)

5) 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고, 구성과 관련한 기초 자료는 응모자가 조사 및 검토하여야 한다.

라. 제안 참고자료

1) <별첨1> 전시기획안

2) <별첨2> 전시물 목록

3) <별첨3> 기획전시실Ⅱ 도면

3. 제안서 작성 요령

가. 제안서의 작성지침

1) 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 한다.

2) 제출된 제안서의 내용은 조달청에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주한다.

3) 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

나. 제안서 작성요령

1) 제안서는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성 권장

2) 설계도, 설계설명서, 관리운영계획서, 예정공정표를 합본 제본권장

3) 제안가격에 대한 세부산출내역서는 우선협상대상자만 기술협상시 수요기관에 제출

4) 설계도 등은 가로방향 작성 권장

다. 제출도서 세부내용

구 분	내 용	매 수	비고
기술 제안서	전시컨셉 2. 전시평면 3. 공간별 세부연출 4. 전시연출 상세(자료연출, 마감재, 색채, 조명계획 등) 5. 설계에 따른 공정 및 운영관리 ※ 위 내용이 포함되도록 15매 이내로 구성	총 15매 이내 (지정크기-A3)	흑백 ․ 칼라

4. 유의사항

가. 제안서 제출사항은 입찰공고문 참조(나라장터)

나. 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

다. 입찰자는 제출된 제안서류에 대한 사실여부 등의 책임을 진다.

라. 제안서의 내용을 객관적으로 입증 또는 설명하기 위해 꼭 필요한 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

마. 제안서의 모든 내용은 지적 재산권 관련 사항을 주의해서 작성하여야 하며, 지적재산권 관련 문제 발생 시에는 입찰자가 책임을 진다.

바. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 불명확한 표현은 사용할 수 없다.

사. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응해야 한다.

아. 본 사업과 관련 이의 및 이견이 있을 경우 입찰자는 발주처의 해석에 따라야 한다.

자. 본 사업은 발주처의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우에 협의하여 진행한다

차. 제안결과에 따른 산출물의 소유권은 국립민속박물관에 있다.

5. 착수 및 완료(결과보고)

가. 전시설계 및 제작은 계약일로부터 5일 이내에 착수해야한다.

나. 설계보완은 박물관의 최종승인을 받아야 한다.

다. 박물관의 지시에 따라 검토를 마친 뒤 제작·인쇄하고 세부지침서에 따른 결과물을 제출해야 한다.

라. 결과물은 계약 만료일까지 박물관에 제출하여 소정의 검수절차를 거쳐야 한다.

마. 박물관이 결과물에 대해 수정․보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후라도 제작자 부담으로 성실히 수정․보완하여 제출해야 한다.

바. 준공도서 상세내용

○ 설계도서 및 내역서 2부

○ 설명패널 등 최종 제작물 원본 파일

○ 전체 내용 및 기타 본 전시물 제작과 관련한 내용을 수록한 저장매체

Ⅲ. 평가방법

1. 평가항목 및 평가기준

가. 평가 대상 및 배점

○ 소정의 기한 내에 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 평가한다.

○ 기술능력평가 80점(기술제안서 평가 70점, 사업수행능력평가 10점), 입찰가격평가 20점으로 배점하여, 총점 100점 만점을 기준으로 평가한다. 평가 순위에 따라 최우수작으로 선정된 업체를 우선협상대상자로 한다.

나. 기술능력평가 : 80점(기술제안서 평가 70점 + 사업수행능력평가 10점)

【기술제안서 평가(정성평가) : 70점】

구분	평 가 항 목		배점
기획 및 제작 계획	전시목적과 전시연출 계획과의 부합성	5	10
	콘텐츠 제작의 적합성(각종 기법 활용 등) 및 연출의 적정성	5
전시연출 및 공간구성 계획	공간구성의 효율성(전시주제 흐름과 구조물 배치의 상응도)	10	20
	전시물 디자인의 독창성(가구류, 받침대, 파티션 등 연출물)	10
세부연출 계획	전시조명 계획의 적정성(조명기구의 적정성 및 설치방법)	10	30
	색채 구성의 적정성, 심미성(공간 및 전시물)	10
	박물관의 특성을 고려한 재료 사용계획(친환경자재 사용여부)	10
관리 및 운영계획	사업수행 공정 및 수행방법의 타당성	5	10
	사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성	5
합계			70

【사업수행능력 평가(정량평가) : 10점】

구분	평가항목		배점
사업 수행 능력 평가	참여인력의 전문성 및 적절성(전문인력 보유 현황)	5	10
	재무구조 및 경영의 안정성(신용평가등급)	5
합계			10

- 전문인력 보유 현황 : 5점

평가항목	평가요소	배점	평가방법
참여 기술자	등급 및 인원	5	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
			0.5	0.4	0.3	0.2
			○ 평점 = 인원 × 기술자별 점수 ※ 최고 배점 5점을 초과할 수 없음

※ 기술자에 대한 등급은“엔지니어링산업 진흥법 시행령”의 <별표 2>의 기술자 등급 및 자격기준에 의함

※ 공고일 기준 3개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당 [재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서, 국민연금관리공단 확인서 첨부]

- 경영상태 : 5점

① 조달청 지침“조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준” 제1장 제9조 제3항 제1호「경영상태 평가기준」의 「기업신용평가등급」(회사채에 대한 신용평가등급에 준함)에 의한 평가

신용평가등급			점수
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5
CCC+ 이하, 미제출자	C 이하, 미제출자	CCC+ 이하, 미제출자	3.5

※ 기업신용평가등급 : 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 발행하는「신용평가 등급 확인서」 다만, 「조달청 신용평가등급 조회 시스템」 또는 「중소기업제품 공공구매정보망」에 의하여 신용평가등급 조회가 가능한 경우에는 동 시스템 조회결과에 의해 평가할 수 있다.

※ 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

다. 입찰가격평가 : 20점

구분	평가기준	배점	비고
입찰가격	협상에 의한 계약체결기준의 평점산식 적용	20	조달청 평 가

2. 평가위원회 구성 및 평가

가. 평가위원회 구성

ㅇ 제안서의 공정한 기술능력평가를 위해 박물관 내․외부의 전문가로 평가위원회를 구성한다.

ㅇ 평가위원회 위원은 국립민속박물관에서 5인 이상 관련분야 전문가로 선정한다.

ㅇ 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하여 종합평가순위를 결정한다.

ㅇ 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 사전 공개하지 아니한다.

나. 평가방법

ㅇ 소정의 기한 내에 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 평가한다.

ㅇ 평가위원은 평가 시 본 지침의 평가기준을 적용한다.

ㅇ 평가총점은 80점을 만점으로 하며, 업체에 대한 심사위원 점수의 최고점, 최저점을 제외한 5인의 총계점수를 산술 평균한다.

ㅇ 산술평균의 값은 소수점 5자리이하에서 사사오입한다.

ㅇ 동점자의 처리는 기술능력평가 점수가 높은 업체를 우선으로 하며, 기술능력평가도 동일한 경우, 제안서 평가의 항목 중 배점이 큰 항목에서 점수가 높은 업체를 선순위자로 한다.

다. 평가결과 발표

ㅇ 평가위원회는 심사내용을 기록한 보고서를 작성하여 평가위원 모두가 서명하고, 발주처에서는 그 결과를 조달청에 제출하여야 한다.

ㅇ 조달청은 제안서 평가점수와 업체평가 점수 및 입찰가격을 종합평가하여 협상적격자 선정 후 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 개찰현황을 공고한다.

라. 기타

ㅇ 제안서 심사결과 및 세부내용에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 응모자는 평가위원 구성, 평가기준, 평가방법, 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

ㅇ 당선작품 발표 후 5일 내에 반출치 아니한 제안도서는 주최자가 임의 파기한다.

3. 협상과정

가. 협상 적격자 및 협상순위 결정

1) 기술능력평가점수가 배점한도(80점)의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정

2) 기술능력평가+입찰가격평가점수 결과 고득점 순으로 협상대상자 선정 및 순차적 협상 실시

나. 협상 내용과 범위

1) 협상대상자가 제안한 과업내용, 추진일정, 제안(입찰)가격 등 제안서의 내용은 일부

조정을 거쳐 발전시켜 나아갈 계획이므로 최종안과 일치하지 않을 수도 있음.

다. 협상절차

1) 협상대상자가 협상내용에 대하여 합의할 경우, 차 순위 협상대상자와의 협상은 생략함.

2) 협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위 협상대상자와 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬될 경우 순차적으로 차 순위 협상대상자와 협상 실시

4. 저작권 및 사용권

가. 당선작

1) 협상당선작에 대하여 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우, 당선자에게 책임이 있음

2) 당선작의 저작권은 당선자에게 귀속된다. 단, 본 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 일반용역계약특수조건 및 용역계약일반조건(계약예규)에 의한다.

3) 발주처는 협상당선작의 수정‧보완 및 변경에 대한 일체의 권한을 가진다.

4) 사업추진과정에서 산출되는 모든 자료에 대한 권리도 발주처에 귀속된다.

나. 당선작 이외 응모작

1) 제안자가 제안도서의 반환을 요청 시 설명도판 및 작품모형에 한하며, 심사에 이용된 제안 설명서는 제외한다.

2) 반환 청구는 접수증을 지참하여 청구하여야 하며, 반환기간은 당선작 발표 후 5일 이내로 한다.

3) 반환청구 기간 내 반환 청구가 없을 시에는 발주처에서 임의로 처분한다.

4) 반환에 따른 제반 비용은 제안자의 부담으로 한다.

5) 제안도서의 보관상의 파손 등에 대하여 반환 시 이의를 제기할 수 없다.

5. 기 타

가. 상기 기술한 내용 외에 평가관련 사항은 공개하지 아니한다.

나. 주최자는 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 입찰서류 제출자는 심사위원 구성, 심사기준, 심사결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없다.

다. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 한다.

라. 협상 방법 등 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」및 협상에 의한 계약 체결기준(계약예규)을 준용한다.

마. 전시계획의 설계내역 중 과잉설계, 부실설계, 중복설계 등의 부분에 대해서는 발주기관의 요구에 따라야 한다.

【붙임 1】제출서류 (입찰공고서 반드시 참조)

구분	제출서류	관련 서식	비고
기술제안서	기술제안서 표지	<서식 1>	제안서 작성지침 참고
	기술제안서 세부 내용
사업수행능력 평가서	사업수행능력평가서 표지	<서식 2>	해당 기관의 전산용 증명원도 가능하나 본 서식의 내용을 포함해야 함
	사업수행능력 자가평가표	<서식 3>
	제안사의 일반현황	<서식 4>
	기술인력 보유현황	<서식 5>
	투입인력 계획	<서식 6>
	신용평가 등급 확인서	<서식 7>
	행정처분내용 확인서	<서식 8>
입찰 참가 신청 서류	사용인감계	<서식 9>
	인감증명서(법인/개인)
	사업자등록증 및 법인등기부등본
	경쟁입찰참가자격등록증
	직접생산확인증명서
	서약서	<서식 10>
	보안서약서	<서식 11>
	청렴계약이행서약서	<서식 12>
	개인정보 수집ㆍ이용ㆍ제공 동의서	<서식 13>
공동수급체	대표자 선임계	<서식 15>	해당 시 제출
	공동제안 협정서	<서식 14>
기 타	서면질의서	<서식 16>
발표자료	발표자료 - 반드시 PDF 형식의 파일로 제출 - 제안서 평가 당일 멀티미디어 장비를 활용하여 발표		제안서와 함께 온라인 제출

[서식1]

기술제안서 표지 양식(참고용)

																						80
		고려인 기증 특별전 <까레이즈, 고려사람> 전시연출용역																								30p, 장평 90%
		제 안 서																								72p, 장평 100%
										2022년 월 일										16
										110
							인식명칭					-											16
							32					16		16		16		16			16
							60

주) 1. 표지크기 : A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 굴림체, 흑색사용

4. 글자크기 : 제목 30, 72호, 날짜. 22호, 식별번호 22

제목 : 고려인 기증 특별전 <까레이즈, 고려사람> 전시연출용역 제안서

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

6. 제안서 심사에 제출하는 모든 문서의 여백, 앞뒤, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는 공모업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 하며, 인지할 수 있다고 객관적으로 판단되는 특정표기가 발견될 시 공정한 심사를 위해 임의로 삭제할 수 있음.

[서식2]

고려인 기증 특별전

<까레이즈, 고려사람> 전시연출용역

사업수행능력 평가서

2022.    .     .

업 체 명 :  (대표사)

대 표 자 :

주    소 :

전화번호 :            (FAX :              )

작 성 자 :            (연락처 : 휴대폰 / 이메일 기재)

[서식3]

사업수행능력 자가평가표

항 목	세부항목			배 점	평 점	비 고
전문인력 보유현황	특급기술자			각 0.5점
	고급기술자			각 0.4점
	중급기술자			각 0.3점
	초급기술자			각 0.2점
	상 한 점 수			5점
경영 상태	회사채	기업어음	기업신용
	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5.0점
	BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75점
	B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5점
	CCC+이하	C 이하	CCC+이하	3.5점
	상 한 점 수			5점
합 계				10점

※ 모든 증명자료는‘사실과 상위 없음’을 날인하여 붙임으로 첨부하여야 함. 증명첨부서류에 페이지를 명시하고, 위의 비고란에 증명첨부서류 페이지를 표시함.

※ 기술자에 대한 등급은 “엔지니어링산업 진흥법 시행령” <별표 2>의 엔지니어링 기술자(제4조 관련) 등급 및 자격 기준에 의함

※ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의 3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가 등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가함. 다만 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가함

[서식4]

제안사의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

[서식5]

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축기술자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
기타

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링산업 진흥법 시행령 <별표 2>에 따르며, 공고일 기준 2개월 이상 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 명기

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학력증명서, 국민연금관리공단 확인서 첨부

[서식6]

투입인력 계획

1. 사업수행 조직표

				사업총괄 책임자
oo 분야			oo 분야				oo 분야			oo 분야
책임자 :			책임자 :				책임자 :			책임자 :

2. 투입인력 총괄 현황

구 분	성 명	직위	담당업무	투입기간 (M/M)	최종학력 (학교명)	해당분야 자격증	해당분야 업무경력	비 고
상주								책임자
비상주

주) 1. 투입인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위작성이 판명될 경우, 평가 후 일지라도 계약업체 선정을 무효화 할 수 있음

2. 투입인력은 책임자 1명을 포함하여 작성요망

[서식7]

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보 합니다.

교부일  2022   .   .

신용평가기관 :                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

[서식8]

행정처분내용

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

[서식9]

사 용 인 감 계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 국립민속박물관에서 주관하는‘고려인 기증 특별전 까레이즈, 고려사람 전시연출용역’입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민·형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임 : 인간(법인)증명서 1부. 끝.

2022년    월    일

주  소 :

업체명 :

대표자 :

국립민속박물관장 귀하

[서식10]

서     약     서

국립민속박물관에서 추진 중인‘고려인 기증 특별전 까레이즈, 고려사람 전시연출용역’입찰에 참여한 당사는 국립민속박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

년   월    일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식11]

보 안 서 약 서

귀 관의‘고려인 기증 특별전 까레이즈, 고려사람 전시연출용역’사업과 관련된 제반사항을 준수하고 보안유지에 최선을 다할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 모든 사항에 대하여 발주처의 어떤 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

년   월    일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식12]

청렴계약이행서약서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 국립민속박물관에서 시행하는「까레이즈, 고려사람 전시연출용역」입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 국립민속박물관에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 국립민속박물관에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰자격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 국립민속박물관에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 6월 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 재단 임·직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각호 각목의 1에 해당하는 기간 동안 국립민속박물관에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 입찰․낙찰․계약체결 또는 계약이행(준공이후도 포함)과 관련하여

가. 1억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

나. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년 6월

다. 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

2) 입찰 또는 낙찰자의 결정과 관련하여

가. 1억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년 미만

나. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 9월

다. 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6월

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계 공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관련 국립민속박물관 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․ 간접적으로 업무수행 하는 자를 포함)과 대리인이 관련 재단 임·직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반 사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물 제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 국립민속박물관에서 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급 등)을 하지 않겠으며, 하도급자 로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 계약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰 참가자격제한, 계약해지 등 국립민속박물관의 조치와 관련하여 당사가 국립민속박물관을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년      월      일

서약자 : ○  ○  ○ 회사

대  표 : ○  ○  ○ (서명 또는 날인)

※ 인감증명서의 인감을 날인 함

국립민속박물관장 귀하

[서식13]

개인정보 수집･이용･제공 동의서
소속 회사	성명	직위	생년월일	동의 여부	서명
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
위 사람은 국립민속박물관의‘고려인 기증 특별전 까레이즈, 고려사람 전시연출용역’의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 국립민속박물관이 수행하는‘고려인 기증 특별전 까레이즈, 고려사람 전시연출용역’입찰 참여에 따른 입찰서류 확인을 위해 최소 정보를 수집하는데 활용 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 생년월일, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/ 계좌번호, 휴대폰번호 등 - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등 - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 생년월일, 주소, 전화번호, 전자우편 등 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외 년 월 일 국립민속박물관장 귀하

[서식14]

공동제안협정서(예시)

제1조 (목적) 이 협정서는 국립민속박물관에서 시행하는‘고려인 기증 특별전 까레이즈, 고려사람 전시연출용역’을 (   )와 (   )가 공동으로 제안하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동제안 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

제3조 (공동제안의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동제안업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                  (소재지 :          대표자 :       )

2. 업체명 :                  (소재지 :          대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 국립민속박물관 및 제3자에 대하여 공동제안업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 제안의 이행으로 종결된다. 다만, 협상작으로 결정되면 국립민속박물관 전시시공완료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동제안업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동제안업체(자)의 구성원은 전시연출용역 설치 업무에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 자격 요건에 미달하게 될 경우에는 제안서를 제출할 수 없다.

② 제안 후 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하고 국립민속박물관의 승인을 받아 탈퇴업체(자)를 교체할 수 있다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동제안협정서를 체결하고 그 증거로 협정서( )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2022.     .     .

○ 대표업체                      업체명 :                 (전화번호)

소재지 :

대표자 :                 (인)

○ 공동제안업체(자)              업체명 :                  (전화번호)

소재지 :

대표자 :                  (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식15]

대 표 자 선 임 계

사업명 :

‘고려인 기증 특별전 까레이즈, 고려사람 전시연출용역’

본인은 국립민속박물관에서 주관하는‘고려인 기증 특별전 까레이즈, 고려사람 전시연출용역’을 위한 제안에 관한 모든 권한을 공동제안대표자에게 위임합니다.

2022.     .

○ 공동제안 대표자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

○ 공동제안자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식16]

서 면 질 의 서

발송일시	년 월 일
제 안 서 접수번호		연락처	전화 : fax :
업 체 명	(대표: )
제안요청서 쪽수
질의내용	※ 제안지침서를 다시 한 번 숙지하시어 질문하여 주시기 바랍니다. ※ 명료하게 작성요망바랍니다.