국립국악원 국악박물관 기획전시

연출 및 기획

제 안 요 청 서

2022. 2.

Ⅰ		과업 개요

1		과업 목적

□ 부채전시를 중심으로 국악의 전승과 학술·진흥활동 등을 재조명

□ 기증자 예우 및 주요 기증 자료를 홍보하여 기증문화 활성화 촉진

□ 기획전시를 통해‘국악’에 대한 국내외 대중적 공감을 형성할 수 있는 다각적 연출 및 전시기법 개발

2		과업내용

□ 과 업 명: 국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 기획

□ 과업기간: 계약일로부터 9월8일(목)까지(철거 및 원상 복구 포함)

□ 과업위치 : 국립국악원 국악박물관

ㅇ국악박물관 3층 기획전시실 / 250㎡(20.31m×12.30m, 천정고 2.34m)

ㅇ국악박물관 2층 상설전시실과 3층 기획전시실의 연결 계단복도 2개소

□ 과업내용

ㅇ국악(판소리, 경기민요), 전통무용, 연희(굿, 줄타기, 야유 등)의 명인이

사용한 부채와 관련 아카이빙 자료를 활용한 전시 기획·연출·구성

□ 세부일정

⚫ 용역 발주 및 계약: 3월~4월

⚫ 기획 및 설계: 계약일 ~ 5월15일(일)

⚫ 기존 구조물 철거(정리): 2022년 5월16일(월)

⚫ 전시물 디자인 제작: 2022년 5월17일(화)~ 5월26일(목)

⚫ 전시실 시험운영 및 보완 점검: 2022년 5월27일(수)~6월1일(수)

⚫ 준공청소: 2022년 6월2일(목)

⚫ 개막식 및 유지관리: 2022년 6월3일(금) ~ 9월4일(일) / 94일

⚫ 철거 및 원상복구: 2022년 9월5일(월) ~ 9월8일(목)

※ 개막식 1주일 전, 시험 가동이 가능하도록 일정을 조율해야 함

□ 과업내용: 전시연출 설계 및 디자인, 사인물·공간 연출

□ 사 업 비: 금100,000,000원(금 일억원/부가세 포함)

□ 추진일정

구 분	내용	일정
착수계	기획안 및 도면 송부	계약후 7일 이내
업무협의	전시 연출 매체 및 방법 논의 후 제작	계약기간 내
전시 실시 설계	전시 실시설계 및 분야별 상세 도면, 유물배치도 작성 세부내역서 산출 및 내역서 검토·승인	계약기간 내
전시 디자인 제작	사인 및 패널 디자인·교정·감수·제작, 영상 및 미디어 매체 제작	계약기간 내
완료보고 및 납품	전시 공간 구성·설치 완료보고 및 납품	계약기간 내
전시물 철거	전시 공간 복구 및 전시물 철거	계약기간 내

3		입찰 및 계약 방식

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조(협상에 의한 계약 체결)에 의함

□ 평가방식: 기술평가(90%), 가격평가(10%)

4		입찰 참가 자격

□ 아래의 자격을 모두 충족한 업체

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및  동법   시행규칙 제14조의 자격 요건을 갖춘 사업자

ㅇ「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의해 나라장터(G2B)에 등록한 업체

ㅇ 건설산업기본법 제9조에 의한 실내건축공사업면허를 보유하고 기타자유업(행사대행업)을 등록한 사업자

ㅇ「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제2조에 따른 중·소기업자 및「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서, ‘중소기업 범위 및 확인에 관한 규정’에 따라 발급된 중소기업·소상공인 확인서를 소지한 업체

ㅇ「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 동법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서(세부품명: 전시회기획 및 대행서비스와 전시홍보관설치서비스)를 소지한 사업자

ㅇ 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

□ 공동수급에 관한 사항

ㅇ본 사업은 공동수급(분담이행방식)으로 입찰 가능함.

ㅇ공동수급체 구성원은 ｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣에 의한 계열사가 아니어야함.

ㅇ공동수급체의 구성원은 본 입찰 외 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없고, 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없음

※ 세부사항은 “공동계약 운용요령(기획재정부계약예규)” 참조

ㅇ공동수급체를 구성하는 경우 붙임 서식 작성 후 제출

ㅇ본 과업은 특성상 일관성 유지 및 효과적인 수행을 위해 하도급을 불허함

□ 입찰참가의 제한

ㅇ입찰 등록일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제76조에서 정한 부정당업체로 지정받은 사실이 있거나, 폐업신고

수리를 받은 업체는 단독입찰 또는 공동수급체의 구성원으로 참가할 수 없음

5		입찰 일정 등

□ 입찰 공고 게시 : 입찰 공고서 참조

□ 제안서 및 입찰서 제출 : 입찰공고서 참조

□ 질의 접수 및 회신

ㅇ질의는 소정의 서면질의서(서식 제18호)를 작성해 전자우편으로 제출 (kwonyh79@korea.kr)

ㅇ서면질의서 작성은 문항 연번을 붙이고 제안요청서 해당 페이지를 명확히

알아볼 수 있도록 함

ㅇ 기재 사항이 불확실하거나 공정한 입찰을 저해할 우려가 있는 경우 응답하지 않을 수 있음

□ 제안서 평가 : 제안서 접수마감일로부터 10일 이내

구 분	추진일정	내 용
사전 공개	5일	• 나라장터 공고일 기준임
입찰 공고	25일	• 나라장터 공고일 기준임
현장 사업설명회	없음
제안서 접수	공고서 참조	• 입찰 등록 및 제안서 제출 • 접수: 전자조달시스템
제안서 평가	공고서 참조	• 추후 공고 (국립국악원 별도 공지)
우선순위 협상대상자 선정, 협상 및 계약	공고서 참조	• 개별 통보

※ 위의 사항은 발주기관의 사정에 의하여 변경될 수 있으며 변경 시에는 참여업체에 개별 통보함

6		제출 서류 및 제출방법

□ 기술제안서(업체현황 포함) 1부

□ 제안서 PT 발표 자료 1부(PDF 파일 형태)

□ 제안서 제출 유의사항

ㅇ제출 서류는 나라장터 시스템을 통해 온라인으로 제출해야 함

ㅇ제안서는 허위나 단순 예상으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재 사항을

객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위사실이 확인될 경우 심사대상

에서 제외됨은 물론 계약체결 후라도 계약 해지와 함께 민형사상 책임을 짐

ㅇ제안서는 제안사 별로 한 건에 한하며, 제출 후에는 수정, 변경, 보완을 할 수 없음

ㅇ제출한 입찰 서류 및 제안서는 일체 반환하지 않고, 제안서 작성 및

제출과 관련된 일체 비용은 제안사가 부담

ㅇ제출한 서류에 위 ․ 변조나 허위 사실이 발견된 경우 낙찰자로 선정된 이후

라도 낙찰 취소 가능

ㅇ제안 내용에 대한 확인을 위해 추가 자료 요청 또는 현지실사를 할 수

있으며, 이 경우 입찰 참가자는 응해야 함

7		과업관리

□ 과업을 수행함에 있어 계약서와 본 요청서를 정확히 파악하고 과업을 충실히

시행해야 하며, 관계 법규와 제 규정을 준수해야 함

□ 과업 지연 시, 발주처와 협의해 향후 일정을 논의하며, 무단으로 일정을 준수하지 않을 시 계약 해지의 사유가 됨

□ 본 과업의 공정별 주요 사항은 반드시 발주처의 협의 ․ 승인을 얻은 후 진행해야 함

□ 본 요청서에 언급하지 않은 사항은 발주처와 협의해야 함

□ 제안서에 명기한 과업 참여 인력은 발주처의 사전 승인 없이 교체할 수 없음

□ 과업을 수행함에 있어 취득한 제반 기밀사항에 대해 철저히 보안을 유지하고 과업을 완료한 후에도 보안을 엄수해야 하며, 특히 과업 내용이 외부로 유출되는 일이 없도록 해야 함

□ 계약 체결 후 10일 이내에 착수계, 과업 일정 및 과업 계획서(제작 참여자 이력 사항 등 포함), 보안각서 등을 작성해 발주처에 서면으로 제출하는 착수 보고를 해야 함

□ 과업 결과물은 발주처의 승인을 받아 시운전 해야 하고, 이 과정에서 발주처가 지적하는 사항에 대해서는 지체 없이 수정해야 함

□ 발주처로부터 최종 승인을 받은 과업 결과물은 저장장치에 담아 제출해야 함(전시관, 홈페이지, SNS 등에서 구동 가능한 파일 형식 포함)

□ 사업 종료 후 10일 이내에 완료 보고서를 제출해야 함(사업 진행 과정 및 콘텐츠 구성 내용 등 포함)

□ 과업 목적에 부합하지 아니해 3회 이상 수정을 요구했으나 응하지 않는 경우, 정당한 사유 없이 과업을 이행하지 않고 이로 인해 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우 계약을 해지할 수 있음

Ⅱ		과업 세부 지침

1		전시 공간

ㅇ 국악박물관 3층 기획전시실

ㅇ 가로×세로: 20.31m×12.30m, 천정고:  2.34m

ㅇ 국악박물관 2층과 3층을 연결하는 복도 계단 공간

ㅇ (필수) 공간 특성을 최대한 효과적으로 활용한 전시 연출 제안

2		전시 내용

□ 전시방향

ㅇ국악 및 전통무용·연희 명인이 사용한 부채를 소재로 한 전시 개최

ㅇ기증자(대여자)의 부채 소장과정과 부채활용 공연 이야기 발굴 전시 콘텐츠 구성

ㅇ부채 관련 영상, 음원 등 콘텐츠 활용 입체적인 감상 구성

ㅇ개별 전시품의 관람 집중도를 높이기 위한 배치와 관람자의 흥미를

이끌 수 있는 오브제로서의 전시기법 강화

ㅇ전시품 간 스토리 연계와 자연스러운 동선을 통해 전시에 몰입될 수 있도록 연출

ㅇ아날로그와 디지털, 원본과 사본(복제품)의 적절한 활용을 통해 관람자의

감각을 확장하여 긴 여운을 남길 수 있는 체험 콘텐츠 기획

□ 전시개요

ㅇ전시명: 2022 국립국악원 국악박물관 기획전시 <부채, 명인의 완성>

ㅇ전시기간: 2022년 6월 4일(토) ~ 9월 4일(일)  ※ 개막식: 6. 3.(금) 16:00

ㅇ전시장소: 국악박물관 3층 기획전시실

ㅇ전시품(안)

구 분	내용	비고
전통예술과 부채	부채 자체로 보이는 예술성 이야기 전통예술안에서의 부채 사용에 대한 이야기
판소리 명인의 부채	정권진, 성창순, 신영희, 정순임, 안숙선, 이난초, 김영자, 정회석, 김수연, 김일구, 윤진철 등	국가 및 시‧도무형문화재 보유자의 부채
무용 명인의 부채	한영숙, 김백봉, 이매방, 임이조, 이애주, 정재만, 채상묵, 양길순, 엄옥자, 김온경, 양성옥 등
연희 명인의 부채	남사당놀이, 줄타기, 농악, 탈춤, 오광대, 야류, 굿 관련 명인 등
국립국악원과 부채	국립국악원 제작 부채, 연주단원부채 등

ㅇ 주요 전시자료(예시)

분야	연번	인물	주요 전시품
			사진	비고
판소리	1	김소희		국가무형문화재 판소리 전)예능보유자 고창판소리박물관 소장(박윤초 기탁품)
	2	정권진		국가무형문화재 판소리 전)예능보유자 정회석 기탁품 (국악박물관 상설전시실/명인실 전시중)
	3	박동진		국가무형문화재 판소리 전)예능보유자 박동진 기념관 소장
	4	성창순		국가무형문화재 판소리 전)예능보유자 국립국악원 소장
	5	정순임		국가무형문화재 판소리 예능보유자
	6	이난초		국가무형문화재 판소리 예능보유자
	7	김영자		국가무형문화재 판소리 예능보유자
	8	정회석		국가무형문화재 판소리 예능보유자
	9	김수연		국가무형문화재 판소리 예능보유자
	10	김일구		국가무형문화재 판소리 예능보유자
	11	윤진철		국가무형문화재 판소리 예능보유자
	12	안숙선		국가무형문화재 가야금산조 및 병창 예능보유자
고법	13	정철호		국가무형문화재 판소리 고법 예능보유자 부채 기증 의사를 밝힘
경기민요	14	안비취		국가무형문화재 경기민요 전)예능보유자 국립무형유산원 소장
무용	15	채상묵		국가무형문화재 승무 예능보유자
	16	한영숙		국가무형문화재 태평무 전)예능보유자 국립국악원 소장
	17	박재희		국가무형문화재 태평무 예능보유자
	18	양길순		국가무형문화재 살풀이춤 예능보유자
	19	김숙자		국가무형문화재 살풀이춤 예능보유자
	20	양성옥		국가무형문화재 태평무 예능보유자 양성옥명인이 사용한 부채춤 부채
연희 굿	21	남사당놀이		국가무형문화재 지정 종목 꼭두놀이 남사당보존회 보유
	22	김대균		국가무형문화재 줄타기 예능보유자 김대균 명인이 사용한 부채춤 부채
	23	강령탈춤		국가무형문화재 지정 종목 양반, 노승, 무당, 미얄할미 등 사용 부채
	24	은율탈춤		국가무형문화재 지정 종목 전 보유자인 장용수가 양반역 연행 시 사용한 부채 국립무형유산원 소장
	25	봉산탈춤		국가무형문화재 지정 종목 국립무형유산원 소장
	26	하회별신굿 탈놀이		국가무형문화재 지정 종목 국립무형유산원 소장
	27	서해안배연신굿 및 대동굿		국가무형문화재 지정 종목 현 보존회장인 김금화가 사용하는 부채
	28	경기도당굿		국가무형문화재 지정 종목
	29	동해안별신굿		국가무형문화재 지정 종목 국립무형유산원 소장
	30	양주소놀이굿		국가무형문화재 지정 종목
	31	남해안별신굿		국가무형문화재 지정 종목 국립무형유산원 소장
	32	은산별신제		국가무형문화재 지정 종목

* 상기 자료는 전시를 위한 사전 조사자료 중 일부이며, 향후 기증 및 대여 추진

* 상기 자료 이외의 명인(작고한 명인 및 시‧도 무형문화재) 보유 부채 추가 수집 추진

* 전시품 수량과 세부구성은 향후 변경될 수 있음

□ 수행내용

(전시 기획)

ㅇ 기획은 ➀ 부채와 전통공연장르와의 관계, ➁ 명인과 부채의 이야기, ③ 기타(한국의 부채장인 등)으로 진행

ㅇ 전시의 핵심 전달 키워드 “부채”, “명인” 등으로 선정하고, 전시를 위한 기증 및 대여품, 국립국악원(국악박물관, 아카이브, 자료실) 소장품을 기반으로 주제 구체화, 전시품 선정, 전시해설 등 구성

1) 전시 연출과 공간구성에 대한 설계도서 작성

2) 연출 및 전시물 설치, 유지운영, 폐막 후 철거 및 원상복구

3) 과업 공간에 대한 벽면, 천정, 바닥 등 시공

4) 전기, 조명, 배선 등 관련설비 보완

5) SW ‧ HW장비 임차(구입) 설치 및 시운전

6) 소리 간섭에 따른 흡음 설비 구상

7) 공간별 색채구성 및 마감재료 연출

8) 사인물, 그래픽, 패널 등(번역, 이미지 사용료 등 포함) 제작

9) 전시 콘텐츠(유물, 보조자료, 재현 등) 자문 및 수집(필요시)

10) 전시 연출물 및 보조매체(사진, 영상, 음향, 체험코너 등) 제작 및 설치

11) 전시 연출에 따른 장비 임대 및 설치

12) 전시 관련 사진‧영상촬영, 자료 구입, 영상·음향 콘텐츠 제작 및 편집 등

※ 사진 및 영상은 고화질 촬영을 원칙으로 함. 세부사양은 발주처와 협의

13) 전시물 배치(디스플레이 방안)

14) 사업수행 일정(공정), 수행방법 타당성 검토

15) 사후관리(하자보수 등) 및 전시장 운영

16) 유지관리 운영 매뉴얼 작성

17) 관리‧운영자 기술이전 및 교육 매뉴얼 작성

18) 효과적인 홍보 및 관리․유지․운영 방안 마련

19) 제안요청서에 제시되지 않은 기타 사항

3		분야별 세부 지침

□ 기본지침

1)“국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 기획”제안요청서를 참조하여 기본방향, 주제, 내용 등을 반영하여 제작․설치에 임해야 한다.

2) 국악박물관의 낮은 층고와 좁은 공간의 한계를 극복할 방안을 모색하고 실별 주제와 연관된 새로운 아이디어와 독창성 있는 구성이 될 수 있도록 제안하여야 하며, 특히 2층 상설전시실과 3층 기획전시실의 연결통로인 계단(2개소)에 대한 연출 방향을 세부적으로 제안하여야 한다.

3) 제안서는 제안요청서 내용을 토대로 영상․음향의 노출 방식과 흡음의 최적화 방안을 제안하여야 한다.

4) 연출 디자인에 있어 조화와 특성, 기능이 잘 드러나도록 구성해야 한다.

5) 작동 전시물 등의 전시 관련 매체는 첨단 전시연출 기법으로 제작되어야 하고, 흥미를 유발할 수 있어야 한다.

6) 사업자는 설계도 제작 및 일정을 본 과업의 발주기관과 협의를 반드시 거쳐야 하며 이를 위해 발주기관과 긴밀한 협조 체제를 구축하여야 한다.

7) 제안 내용 또는 그 일부가 저작권, 특허권 등 배타적 권리에 관련되었을 경우 발주기관에게 그로 인한 어떠한 불이익도 발생되지 않도록 한다.

8) 학술 및 기술적 고증과 자문이 필요한 경우 관련 분야 전문가, 학술단체 등의 고증과 자문을 거친 후 연출 및 제작‧설치에 반영하여야 한다.

9) 전시물의 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 제시해야 한다.

10) 제안서, 설계도서, 시방서 등에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히

시공해야 될 사항이나 관계 법령에 규정된 사항 등은 발주기관의 요구에 따라

사업자의 부담으로 시공하고, 해석상 의문 사항 및 제외된 사항은 발주기관의

해석에 따른다

□ 설계도 제작

1) 설계도는 발주기관이 제시한 제안요청서를 바탕으로 최적의 결과물이     도출되도록 연출 및 기획 방안을 제시하여야 한다.

2) 사업자는 기획전시 공간의 기능에 따른 구획과 연출과 전시에 필요한 설계도서를 작성하여 사업을 추진하며, 이에 발주처와 긴밀한 소통을 하도록 하여야 한다.

3) 계단, 출입문은 관람객 안전성과 편의성을 고려한 공간으로 계획한다.

4) 건축 내부 구조물(마감)의 한계를 보완하여, 시공과정에서 일정에 차질이 없도록 설계도를 작성하여야 한다.

5) 사업체에서 제작한 연출 및 기획 설계도에 대해 책임져야 하며 시공 도중 설계도의 미비점이 발견될 시는 수정 작업을 하여야 하고, 이에 따른 비용은 별도로 계상하지 않는다.

6) 공간 구성 및 동선, 배치, 구성 등은 설계도면을 토대로 과업을 수행하되 더욱 효과적인 연출이나 내용 전달을 위해 일부 콘텐츠 내용을 변경할 수 있다.

□ 소방시설

1) 소방계획을 제시하여야 한다.

2) 전시실 내부 소방 설비인 스프링클러 등 소방 설비 작동에 대비하여 전시물을 보호할 수 있도록 한다.

3) 건축 소방 설치 이후 변경 설치되는 부분은 사업자가 부담하여 설치하여야 한다.

4) 전시실 내부에 설치되는 공공장소에는 소방법에 저촉되지 않는 자재 및 설비를 사용하여야 한다.

□ 사업의 이해(전시개요)

1) 전시주제는 발주기관에서 제시한 “전시구성”(안)를 토대로 조화성․심미성․쾌적성․운영관리 등의 사항이 충분히 고려되어 최적의 안으로 제시하되, 유물, 전시 보조자료, 영상 등 다양한 전시 매체를 활용하여야 한다.

2) 전시계획을 작성함에 있어 전시 및 체험 공간의 충분한 이해와 공개된 각종 자료를 근거로 전문가의 검증을 충분히 거쳐 전시연출에 반영하여야 한다.

3) 국내․외 유사사례를 분석하고 적극적으로 적용해야 한다.

4) 국립국악원만의 독창적 전시품을 제시하여야 하며 기존 타 박물관 및 유사 기관과의 최대한 중복성이 없도록 전시를 구성하여야 한다.

□ 공간구성 계획

1) 전시 평면 구성은 다음과 같이 한다.

ㅇ전시 스토리라인에 의거한 조닝(Zoning)과 구역(Section)을 분류하여 각

부문별로 특성 있는 메시지를 전달할 수 있는 전시 평면 및 입면을 구성

하여야 한다.

ㅇ전시물의 특성상 활동적인 부분을 감안하여 개방적, 입체적 느낌을 줄

수 있는 전시 디자인 연출을 구성하여야 한다.

ㅇ전시 시설물의 분석을 통한 적정 수용인원의 동선이 고려된 공간 구성과

면적을 배분하여야 한다.

ㅇ전시물과 유기적으로 연계한 상호(Interactive) 체험 아이템을 설치하고,

다른 섹션과 자연스럽고 안전하게 동선이 이어질 수 있도록 하여야 한다.

ㅇ전시시설 관련 전기·기계적 통제(Control) 설비시설은 관리 및 A/S가

편리하도록 서비스 공간을 구성하되 최소한의 공간으로 통제 가능하도록

구성하여야 한다.

ㅇ전시 관람객의 편의를 위한 휴게시설 등 각종 편의시설을 적정 요소에

배치하여야 한다.

2) 단면계획은 다음과 같이 한다.

ㅇ전시실 천장의 높낮이를 고려하여 최적의 전시 연출이 되도록 전시물의

특성을 살린 구성을 하여야 한다.

ㅇ건축 구조물 내에서 안정성과 편의성을 고려하여야 한다.

ㅇ전시 시설물은 최대한 개방형 전시 관람을 전제로 구성하여 관람객의

직‧간접 체험이 이루어질 수 있도록 구성하여야 한다.

ㅇ전시 시스템은 건축 시설물과 상호 연관성이 있으므로, 건축 환경을

고려하여 최적의 전시연출이 되도록 구성하여야 한다.

3) 입면 계획은 다음과 같이 한다.

ㅇ전시물의 특성을 살린 입면으로 구성하여야 한다.

ㅇ각 전시 시설물의 연출 특성에 부합되는 디자인(Design)과 시설물을

이용하여 연출 효과를 극대화 하여야 한다.

(전시동선)

1) 전시공간의 동선은 관람객이 무엇을 보아야 하고, 어떻게 움직여야 하는지가 한 번에 파악할 수 있도록 구성해야 한다.

2) 관람 및 운영 편의를 위한 관리 동선은 별도로 계획하여야 한다.

3) 관람 동선을 충분히 고려하여 인원의 적절한 분산과 관람객들의 휴식 공간을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

4) 전시공간의 관람 동선은 독립되면서도 상호 연계성 있게 계획되어야 하며, 관람으로 인하여 발생하는 동선 정체 현상이 없도록 자연스러운 전시 관람이 되도록 한다.

5) 최대 수용인원의 동시 관람 시 관람으로 인하여 발생하는 동선 정체 현상이 없도록 각종 전시 및 체험 시설물의 관람시간 등을 감안하여 상호 간섭이 없도록 계획하여야 한다.

6) 피난 동선을 적절하게 활용하여 전시 동선을 계획하여야 한다.

7) 피난 동선의 확보 및 진출입로의 접근이 용이하도록 하며 비상 탈출이

용이하도록 시설물을 배치하여야 하며 사인물을 적소에 설치하여 피난 및 진출입이 용이하도록 하여야 한다.

8) 장애자와 노약자를 위한 동선을 배려하여야 한다.

9) 만일의 사고에 대비한 비상 동선을 확보하여야 한다.

10) 미디어 설치로 인한 병목현상이 발생할 경우를 대비하여 동선상의 공간을

확보하여야 한다.

11) 체험 동선은 전시 동선의 주제 및 전개와 연계성을 갖도록 구성하여야 한다.

12) 정체 예상 구역의 상호 간섭이 없도록 동선의 폭을 조정하여야 한다.

13) 각 공간의 연결부 및 복도, 외벽 등 여유 공간을 최대한 활용하여 연출하도록 한다.

14) 전시관 내부에도 관람 동선과 추가 전시물 설치 등을 고려하여 휴게공간을

적절히 배치한다.

15) 전시관 출입구 및 통로의 폭은 전시물의 이동 및 관람의 쾌적성을 유지하여야 한다.

(사인물, 패널, 전시설명문 등)

1) 사인물 디자인 개발 및 설치 계획을 제시하여야 한다.

2) 패널, 사인물 등을 비롯한 사인물 일체를 전시장 내에 제작 설치하여야 한다.

3) 통일된 시각 전달체계를 확립하고 사인물의 인지성, 시설물 이용의 편리성 및 활성화를 고려하여 제작하고 설치하여야 한다.

4) 실별 안내 사인물은 디자인적으로 심플하면서 관람객의 시선과 마음을 끌 수 있도록 포인트를 주어야 한다.

5) 사인 패널은 주제 전시물에 대한 흥미와 관심을 고취시킬 수 있도록 디자인하고 관람자의 최적 인지성과 편의성을 고려하여 쉽게 볼 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

6) 전시 설명문의 경우 관람객의 피로도와 이해도를 고려하여 가장 함축적이면서도 가장 쉽게 이해할 수 있도록 내용을 최소화하여야 한다.

7) 전시보조물은 한국어, 영어로 제작하여야 한다. 다만, 영어로 제작하는 것이 적절하지 않은 경우 발주기관과 협의하여 제작한다.

8) 안전사고 예방을 위한 디자인을 적용하여야 한다.

9) 노약자, 장애인, 어린이 등을 위한 시설은 관련법규에서 정하는 기준에 따르며 점자 안내판 등 전시 및 관람 편의성을 제공하고, 충격 및 미끄럼방지 등을 반드시 고려하여야 한다.

10) 각각의 전시물 및 체험물은 어린이, 노인, 장애인들이 사용함에 있어         불편함이 없도록 계획하여야 한다.

11) 전시물 관련 사항의 모든 자료와 그에 수반되는 모든 비용은 사업자가 부담함을 원칙으로 한다.

12) 전시물 제작 관련 자료수집, 연출 및 제작 방법 등에 대해 반드시 발주처의 협의와 승인을 얻으며, 전시물에 대한 저작권은 발주처에 있다.

13) 저작권에 관련된 콘텐츠 및 전시에 사용하는 패널, 네임카드 등의 폰트에 관해서는 사업자가 부담하는 것을 원칙으로 하며, 저작권 침해 등의 문제가 발생 시 사업자가 해결하여야 한다.

14) 모든 콘텐츠 관련 자료에 대한 검증 및 고증은 사업자가 그 해당 내용에 대해서는 보증하여야 하며, 이미지 사용 및 내용 등이 기존의 지적 재산권을 침해하지 않는 범위 안에서 제작하여야 한다.

15) “발주기관”과 “사업체”는 별도의 계약을 체결하여, 저작권 관련 분쟁의 소지가 발생하지 않도록 사전에 조율을 하여야 한다.

□ 전시기법 및 연출계획

(전시물 연출기법)

1) 각 전시실의 전시계획은 각 전시주제에 맞는 구성과 연출에 새로운 아이디어를 구상⋅제안하여야 하며, 반드시 관람객의 흥미와 집중을 고려하여야 한다.

2) 연출 개요, 항목, 방법, 세부연출 등을 구체적으로 작성하여야 한다.

3) 전시연출 및 내용은 구체성, 적정성, 타당성을 갖도록 계획하여야 한다.전시실별 독창성을 갖추되, 전시실의 전체적인 통일성을 반영하여야 한다.

4) 전시 스토리라인에 충실한 세부 디자인 연출계획을 수립하고 전시시설을 제작⋅설치하여야 한다.

5) 첨단 영상매체 및 디지털 등을 활용한 전시기법 등 다양한 표현 매체를 활용하여 전시실을 구성할 수 있도록 하여야 한다.

6) 전시장 내외부에 관람객이 충분하게 머물 수 있도록 서가, 책상과 의자 등의 배치 방안을 모색하여야 한다.

7) 영상물‧음향을 활용하여 최적의 전시연출 방안을 제시하여야 하며, 하드웨어의 구입 및 임차 시 설치와 시공까지 사업의 범주 안에 포함한다.

8) 전시공간은 제안요청서 상의 계획안을 참고로 하여, 사업자가 합리적인 방안으로 연구․발전시킨 것을 제시하여야 한다.

9) 외부 진입부, 1층 로비, 휴게공간 등 여유 공간을 최대한 활용하여 전시할 수 있도록 하여야 한다.

10) 전시를 위한 시설물의 연출은 추후 부품 교체, 보수, 시설물의 가변성 등

유지관리에 용이하도록 한다.

11) 첨단 기술과 최신 연출기법 및 신소재를 최대한 활용하여 전시효과를

극대화하여야 한다.

(전시물 배치/디스플레이)

1) 전시유물의 경우 내용을 가장 효과적으로 전달할 수 있는 방법을 설계도에 반영하여, 이에 적합한 소도구 및 전시보조물을 제작, 연출 및 설치를 하여야 한다.

(항온항습)

1) 전시장의 환경을 고려하여 전시품이 안전하게 보존될 수 있는 방안을 수립하여 제안하여야 한다.

(진열장 디자인)

1) 전시 진열장의 경우, 밀폐성, 개폐의 용이성 및 보안, 조명, 관리 편의성 등을 면밀히 고려하여 설치하고, 전시 유물의 특성을 고려하여 진열장의 케이스․조명 등을 디자인해야 한다.

2) 항온항습 등 관리 차원에서 개폐식이 가능한 전시장 설치를 고려하되, 개별 전시장일 경우도 편의성을 점검하여야 한다.

3) 유물 보존처리 등 약품 공간 등을 함께 고려하여야 한다.

4) 전시장의 유리는 안전을 최우선으로 할 수 있는 유리의 재질에 대한 상세 내역을 최적의 품질로 제시하여야 한다.

5) 구조물 및 전시물의 점검구 및 출입구는 마스터키를 사용하여 관리가 용이하여야 한다.

(조명 디자인)

1) 전시장 조명 및 전시물 조명 계획을 제시하여야 한다.

2) 전시장의 유지관리를 위하여 설치된 건축조명을 제외한 기획전시의 조명은 조도 기준에 의거하여 조명 계획을 수립하고 감독기관의 승인을 득한 후 설치하여야 한다.

3) 매쉬 천정에 따른 라이팅 트랙(레일)의 사용 방안과 이동성 및 안정성을 가질 수 있도록 구체적인 구성방안을 제시하여야 한다.

4) 전시공간의 전체 조명 및 전시물 집중 조명에 적합한 조명 배치와 조명기구가 설치되어야 하며, 전시물 보존을 위한 보호 장치가 고려되어야 한다. 특히 유물을 관람할 때 유물의 특성이 가장 잘 보일 수 있는 조명을 선택․제안․구성하여야 한다.

5) 유물 디스플레이 이후 조명 세팅이 불가능한 진열장(공간)을 찾아 조명 교체 방안을 모색하여야 한다.

6) 전시실의 조명 및 스위치 등은 관람객의 손에 닿지 않도록 시공하여야 한다.

7) 적정 조도 결정과 함께 점멸 기능을 포함하여야 한다.

8) 조명을 설치할 경우 순응을 고려하여 설치하며 조도와 휘도차가 최소화할 수 있도록 설치하여야 한다.

9) 천정에 설치하는 조명은 하중과 내구성을 충분히 고려하여 추락의 위험을 예방할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

10) 쾌적한 관람환경이 조성될 수 있어야 하며 관람순서 및 요소에 맞는

체계적인 조명 계획을 수립하고, 전시물의 입체감이 강조될 수 있도록

계획을 수립하여야 한다.

11) 전시조명은 건축조명과 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 조정이 용이하도록

설치하여야 하며, 전시장 관리 조명을 제외한 전시장 조명의 시공은 전시에서

일괄적으로 구축하여야 한다.

12) 전시․체험물의 분위기 연출을 위하여 적절한 조명 계획(전시용 조명과

관리용 조명, 구간별 조도 분포 등)을 수립하여 제시하여야 하며, 관람객의

시야를 방해하지 않아야 한다.

13) 전시조명 기구는 각도조절 및 이동이 용이한 것으로 설치를 하되 휘도 및

광분포가 고를 수 있도록 하여야 하며 설명 패널의 경우는 가독성을 최대한

확보하여야 한다.

14) 전시장 조명은 적정 조도 산정, 순응, 전시물에 대한 집중성 향상, 광의

지향성과 확산성의 조화, 마감재의 반사 값에 대한 고려, 휘도분포 등을

종합적으로 고려하여 조명을 계획하고 설치하여야 한다.

15) 조명기구의 설치기준은 각 전시실 환경을 감안하고 전시물의 특성에

맞도록 조도 기준을 정하여 보수가 용이하도록 설치하여야 한다.

16) 조명기구는 미관 및 기능성을 고려하여 아이템을 선정하고, 공간과 조

화로우면서도 개성 있는 조명공간을 조성하여야 한다.

17) 관람 동선을 고려하여 조명을 배치함으로써 이동에 필요한 조도를 확보함은

물론, 이동 중 필요한 정보를 습득할 수 있도록 하여야 한다.

18) 동선의 조도는 전시물의 조도는 각각 다르게 계획하나 순응이 고려되며

조도와 조화롭게 계획하여야 한다.

19) 등기구 외관의 미려함 뿐 만 아니라 조명 배광이 만들어 내는 빛 패턴을 이용,

무미건조한 전시공간을 다이내믹한 조명공간으로 연출하여야 한다.

20) 전반조명을 최소로 설정, 전시물에 포인트 조명을 설치하는 방식으로

절제된 빛을 사용함으로써 관람의 집중도를 높일 수 있도록 조명환경을 제공하여야 한다.

21) 각각의 조명은 영역의 구분, 전시물 및 패널의 부각, 관람 분위기 유도 등

다양한 역할을 하여야 한다.

22) 직간접적으로 관람객을 향할 수 있는 조명은 피하여 설치하고 전시물이

주위환경보다 밝을 수 있도록 조명기구를 설치하여야 한다.

23) 전시물을 위한 조명을 설치할 경우 전시물의 밝기의 순서는 “전시물>

패널>주변 환경” 순으로 설정하여 전시물과 패널의 관찰 및 판독이 용이하도록 조명을 설치하여야 한다.

24) 조도의 분포는 70%로 내외로 고를 수 있도록 조명기구의 위치, 방향,

각도 조정 등을 모두 고려하여야 설치하여야 한다.

25) 전시물과 배경의 분리 및 대조가 명확하여 전시물의 입체감이 뚜렷할 수 있도록

계획하여야 한다.

26) 주광에 근접한 색채감각을 재현하고 휘도, 조도 위계 설정, 광원의 연

색성, 글레어의 차단, 색온도에 따른 광색감과 조도와의 조화, 광의 지향성과

확산성의 조화, 마감재의 반사 값에 대한 고려 등을 반영하여 조명 계획을

수립하여야 한다.

27) 조명기구는 패널과 인접하게 설치할 경우 휘도차가 많이 나므로 적정거리를

고려하여 설치하고 직접조명보다는 확산조명을 사용하여 휘도 및 조도의

분포가 고를 수 있도록 하여야 한다.

28) 발열이 높은 조명기구를 설치할 경우 안전을 최우선적으로 고려하여 마

감재 및 환기계획을 수립하여야 한다.

29) 등기구의 교체가 용이할 수 있도록 전시물 및 시설물에 점검구를 설치하여

유지관리가 용이하도록 하여야 한다. 다만, 점검구가 낮은 층고로 인해,

전시 관람 시 안전에 문제가 발생하지 않도록 설치해야 한다.

30) 전시물 내부에 설치되는 조명의 경우는 동선의 조도보다 밝게 구성하되

난반사나 눈부심을 최소화할 수 있어야 한다.

31) 유물 디스플레이 이후 조명 세팅이 불가능한 진열장(공간)을 찾아 조명 교체

방안을 모색하여야 한다.

32) 조명으로 인해 전시장 유리와의 반사가 일어나지 않도록 고려하여야 한다.

(모형 및 체험물)

1) 관람객이 관심을 가지고 집중할 수 있도록 하는 전시 아이디어를 구상하여 연출하여야 한다.

2) 감상 체험은 관람객이 감흥을 느낄 수 있는 스토리가 가미되어야 하며, 아날로그와 디지털이 조화를 이루면서 아날로그적인 체험이 강조되어야 한다.

3) 관람객의 흥미를 유발하여 재방문을 할 수 있도록 다양하고 변화 있는 공간으로 구성한다.

4) 감상 체험의 경우 발생 될 수 있는 소음에 대한 대비를 해야 하며, 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작하고 관람객의 행동반경, 동선, 대기열 등을 고려하여 공간배치 하여야 한다.

5) 복제유물 제작 시 원형 복제를 원칙으로 하되 그 외의 방법에 대해서는 반드시 발주처와 협의하고, 전문가의 고증과 자문을 토대로 실물과 동일한 형상이 되도록 제작하여야 한다.

6) 체험물은 재질, 규격, 하중, 보조 시설 종류 및 규모 등 제작에 필요한 제반 사항을 종합적으로 상세히 제시하여야 한다.

7) 전시실 내 체험물은 관람객의 안전을 보장하여야 하며, 관람객의 조작에 파손 우려가 적은 구조로 제작되어야 한다.

8) 전시실에 대해서는 관리 요원을 최소화할 수 있도록 계획한다.

9) 감상 체험은 발주기관 승인을 받아 설치‧제작하여야 한다.

10) 체험물은 유지 및 보관이 용이하도록 제작하되 특별히 점검구가 필요한 경우에는 눈에 띄지 않는 곳에 점검구를 두도록 하여야 한다.

11) 나사류 및 잠금장치는 모든 전시품의 점검 및 유지관리가 용이하도록 가능한 단일규격을 사용해야 한다.

□ 전시매체 계획

(영상‧음향‧정보 SW 연계 재생)

1) 영상물‧음향 등을 활용한 전시실별 최적의 전시연출 방안 및 영상재생기의 기능과 이용화면을 구성하여야 한다.

2) 발주기관과 협의 후 제작한 영상과 음향을 활용하여, 연출 방안과 영상재생기의 기능 및 이용화면의 구성 방향을 제시하여야 한다.

3) 관람객의 공간 및 전시 콘셉트에 대한 이해 제공을 위해 디지털 안내 사인물을 제작하여야 한다. 이에 대해서는 발주기관과 협의하여 진행하여야 한다.

4) 전시 영상물은 같은 공간에 설치, 운영되는 다른 콘텐츠와의 연계성, 통일성을 고려하여 전체적인 구성과 연출이 이루어질 수 있도록 한다.

5) 전시․음향물은 전시 관람에 영향을 주지 않도록 설치장소 및 지향각도, 음량을 고려하여야 한다.

6) 각종 테스트 일정 및 방안, 문제발생 여지에 대해 구체적으로 계획을 제시하여야 하며, 박물관 개관 이전에 장비를 설치하고 테스트할 수 있는 충분한 일정을 발주기관과 협의 하에 계획하여야 한다.

7) 전시실 개편 구축 후 시험 운영 방안 및 계획을 구체적으로 제시하여야 하며, 시험 운영을 통해 평가가 이루어질 수 있어야 한다.

(HW장비 및 주요기자재 품질)

1) 주요 기자재 세부계획을 제시하여야 한다.

2) 관람자의 청각적 효과를 극대화할 수 있도록 전송되는 음성 신호는 명료하여야 하며 각 전시공간의 특성에 맞는 스피커를 설치하여 최적의 음성서비스를 제공하여야 한다.

3) 영상모니터는 최적의 해상도를 표현할 수 있는 화면크기와 기종으로 설치해야 한다. 세트 또는 별도의 케이스 속에 설치되는 영상모니터의 외관은 주위의 시설물과 조화를 이룰 수 있도록 마감처리 하여야 한다.

4) 모니터와 스피커 음량을 최적화하여 설치하여야 한다.

5) 각종 H/W 장비는 구매 전 제품의 성능과 사양서를 사전에 발주기관에 제출하고 승인을 득한 후 구매해야 하며 장비 유지관리 매뉴얼을 별도로 작성하여 제출한다.

6) 영상물이 상영되는 모니터(Monitor)나 스크린(Screen)면은 주변 조명으로 인한 반사가 생기지 않도록 해야 하며, 쇼케이스로 인한 간섭이 없도록 조명 및 조도를 조정하여야 한다.

7) 전원을 꺼도 해당 프로그램(Program)은 항상 저장하고 있어야 할 뿐 아니라 프로그램의 수정, 저장 등이 손쉽게 이루어질 수 있도록 제작하여야 한다.

8) 각 전시 부스(booth)별로 제공되는 음향장치는 관람객에게 영향을 주지 않도록 설치하여야 한다. 외관이 타 전시물과 어울리도록 매입 및 마감처리 하여야 한다.

9) 영상물은 모니터를 비롯하여, 프로젝트 투사 등 영상재생 방식에 있어 다양성을 모색하여야 한다. 영상 및 음악 감상의 경우 지향성 스피커, 헤드폰 사용 등 청취 방법을 모색해 소리의 간섭을 피하고, 관람객에게는 다양한 음악 감상 체험을 즐길 수 있도록 하여야 한다.

10) 자체발열이 발생하는 모니터나 프로젝터를 매입 설치할 때는 환풍 및

통풍을 고려하여야 하며 온도상승에 따른 고장이 발생되지 않도록

설치 구조물을 제작하여야 한다.

11) 영상 및 음향 재생 장비는 가정용이 아닌 산업용 장비이어야 하며, 제어방식과

프로토콜이 제공되는 장비를 사용하여야 한다.

12) 영상 H/W 및 콘트롤러(Controller)는 향후 A/S 관리차원에서 장비와

부속품이 단순하여야 하며, 향후 시간이 경과해도 부품의 교체가 가능하여야 한다.

(영상‧음향물 등의 소리 간섭에 따른 흡음)

1) ‘국악’이라는 주제로 구성하는 전시인 만큼 전시실 내 음향 및 영상설비에 대한 연출 방안 및 상영에 따른 흡음 및 음향간섭에 대한 방안을 고려하여 전시를 구성하고 이를 제시하여야 한다.

2) 전시실 내 음향의 쾌적성을 고려하여 전시실 외부와 전시실 내 설비, 장치의 소음이 배제되도록 영상과 음향물에 대한 흡음 방안 수립하여야 한다.

(HW 통제시스템 적정성)

1) 모든 전기장치는 누전에 의한 사고가 발생하지 않도록 충분한 절연과 적절한 접지를 해주어야 한다.

2) 전시시설 관련 전기․기계적 통제 설비시설은 관리 및 A/S가 편리하도록 서비스 공간을 구성하되 최소한의 공간으로 통제 가능하도록 구성하여야 한다.

3) 중앙통제실에서 데이터, 전원 등의 원격제어 및 모니터링이 가능하도록 시스템을 설치해야 한다.

4) 검색․이용통계 등의 리포트, 유(무)선 네트워킹 기능이 정보시스템과의 상호운용성이 확보될 수 있도록 시스템을 구축하여야 한다.

5) 콘텐츠를 손쉽게 제어할 수 있도록 프로그램과 시스템을 구축하고, 수시로 업그레이드가 가능하도록 중앙컨트롤과 메인 서버 개념을 도입하여야 한다.

6) 필요에 따라 시연 중인 콘텐츠를 존(Zone)과 구역(Section)별로 정지시킬 수 있고 안내 등의 복합기능을 구현할 수 있도록 하여야 한다.

7) 시뮬레이터, 특별한 장치나 시설이 필요한 전시물의 경우 전기용량, 하중, 기타 특수 시설 등 상세한 내역을 표기하여야 한다.

□  유지관리 및 운영계획

(사업수행 일정)

1) 전시연출 및 제작․설치 등 전체 사업 추진 일정을 종합적으로 고려해 제시하여야 한다.

2) 전시 개막 이전, 영상‧음향물 HW설치 및 SW테스트를 위한 일정을 발주기관과 상의하여 확보하여야 한다.

3) 발주기관이 필요에 의해 과업보고회 등을 요구할 경우 사업자는 이에 대해 관련 자료 등을 준비하여 보고하여야 한다.

4) 세부 추진 일정 및 관리계획

① 설계, 연출, 제작․설치 일정 등을 고려하여 일정 제시하여야 한다.

② 단계별 주요업무계획 제시하여야 한다.

③ 수행 조직 및 업무 분장은 실제로 참여할 인력 및 조직을 기준으로 작성하며, 각 사업추진 단계별 주요 발생업무를 구체적으로 기술하여야 한다.

④ 해당 업무수행을 위한 공정별, 인력투입 계획을 제시하여야 한다.

⑤ 제작설계 및 제작․설치를 전담 관리하는 총괄책임자 및 각 분야별

책임자에 대해 작성하여야 한다.

⑥ 개별업무의 책임 및 감독/승인 권한 등 업무 범위를 제시하여야 한다.

⑦ 사업특성 및 발주기관 요구사항(제안요청서)의 명확한 분석을 통하여 요구업무를 원활히 수행하는 유사 프로젝트 과업 수행 경험 및 업무수행 능력을 고려한 인력투입 계획을 체계적으로 수립하여야 한다.

⑧ 각 인원의 특성에 맞도록 업무분장 계획을 제시하여야 한다.

⑨ 전문분야(전시콘텐츠, 영상, 사인물, 색채 등)의 객관성, 신뢰성, 타당성을 확보하기 위해 관련 자료의 확보 및 세부 검증계획(전문가 검증 등)을 제시하여야 한다.

⑩ 발주기관 의도의 용이한 반영을 위해 제작․설치 과정에서 문제 발생을  최소화 하도록 설계 시 예측 가능한 부분을 명기하고 조치계획을 제시

5) 공정관리를 위한 조직도 및 방안을 제시하고 세부 일정표를 함께 제출하여야 하며 품질관리를 위한 공종별 세부 점검표를 제시하여야 한다

6) 낙찰자는 상세공사비 산출 내역 및 시방서를 계약 후 발주기관과 협의한 일자 이내에 제출하여야 한다.

7) 기타 제안사가 추가로 필요하다고 예상되는 자료를 제시하여야 한다.

(수행방법의 타당성)

1) 모든 전시물 제안은 현실적으로 전시연출 및 제작․설치 및 실행 가능성이 있어야 한다.

2) 건축설계, 전시연출 및 제작․설치 상세도와의 일체성을 고려하고, 전시 시설물의 가변성을 반영한 전시 공간계획이 이루어지도록 하여야 하며 방재 기능과 에너지 절약에 부응되는 시공이 되어야 한다.

3) 제작․설치과정에 참여하는 협력업체 및 하도급 업체 등에 대한 종합적인 관리방안을 제시하여야 한다.

4) 공정관리, 품질관리, 안전관리 및 환경관리방안을 제시하여야 한다.

5) 전시물의 제작 방안, 검수 프로세스 및 방안을 제시하여야 한다.

(철거 및 복구)

1) 전시실은 전시기간이 종료된 시점에서 철거대상 시설, 설치물의 철거 및 주변 폐기물 처리, 원상복구 등의 현장정리는 7일 이내에 완료하고 이에 대한 비용은 계약상대자가 부담하는 것으로 한다.

※ 전시 철거: 발주처와 협의하여 전시 종료 후 2022. 9. 8.(목)까지 철거

2) 구조물 등의 설치 시에는 박물관 전시실의 기본구조가 훼손되지 않는 공법을 채택하여야 하며, 훼손부에 대해서는 전시 철거 시에 원상복구 해야 한다.

(사후관리/하자보수 및 운영)

1) 전시물의 유지관리방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

- 전시물 하자보수 비용, 주기 등을 포함한 관리방안을 제시

2) 통합적 관리 체계를 계획하여야 한다.

- 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 하자보수를 위한 조직 및 인력지원체계 및 세부운영계획을 제시

3) 공간을 최적으로 활용하고, 콘텐츠의 교환 및 유지․보수가 손쉽게 이루어질 수 있도록 시설을 구축한다.

4) 하자보수 지원은 근무시간을 기준으로 하되 발주기관의 요구가 있을 경우, 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원하여야 한다.

5) 콘텐츠 장애 및 시설물에 하자가 발생하여 지원 요청시 신속하고 원활하게 지원할 수 있는 세부계획을 제시하여야 한다.

6) 제작‧설치에 대한 하자보수 기간은 준공일로부터 전시종료일까지로 하며, SW분야 하자보수와, HW분야 하자보수 기간도 동일

7) 전시물의 안정적인 작동과 효율적으로 하자보수 및 관리․운영이 가능하도록 매뉴얼을 작성하여야 하며 유지관리에 필요한 비용을 산정하여 기술하여야 한다.

8) 전시물 설치 및 시운전 완료 후 전시물의 하자보수 및 유지보수(진열장 개폐, 조명, 영상, 하드웨어, 소프트웨어 등 관련)가 원활하게 이루어질 수 있도록 운영하여야 한다.

9) 운영 단계(하자이행 기간 내)에서 고장 및 수리(하자이행 기간 중 동일한 부품 및 부위 2회 이상)가 발생하는 전시물은 즉시 해결 방안을 제시하고, 발주기관 요구 시 부분 또는 전면 재제작․설치하여야 하며 그 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

10) 사업자는 계약 전시물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자담보 기간 내에 처리하여야 하며, 그 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

(기술 이전)

1) 운영자 대상 콘텐츠의 기능 및 하드웨어 구조의 원활한 하자보수와 운영 등이 가능하도록 교육을 지원하여야 한다.

2) 발주기관의 전시실 운영과정과 관련되어 필요하다고 생각되는 기술이전 대상에 대한 목록 및 이전방법 등에 대한 계획을 제시하여야 한다.

3) 전시실 개편 구축 및 관련 분야 정보기술에 대한 지속적인 정보 제공 및 기술자문에 응하여야 한다.

4) 사업자가 구축한 시스템에 대하여 발주기관이 기능 보완을 하고자 할 경우 사업자는 필요한 제반 기술 사항을 지원하여야 한다.

5) 시스템 사용을 위한 시스템 교육, 정보화 마인드 함양 및 홍보업무 능력 향상을 위한 마인드 교육을 지원하여야 한다.

4		과업수행조건 및 도서납품목록

□  동 사업수행에 필요한 장비 일체는 사업자가 자체적으로 확보하여 사업을 수행하여야 한다.

□  사업자가 제출한 설계도서의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

□  과업 수행 업무보고

1) 과업 수행 보고

ㅇ착수보고: 사업자는 계약 체결 후 14일 이내에 본 과업에 착수하여야 하며

과업 착수 시 착수계를 제출하여야 한다.

ㅇ중간보고: 전시연출 및 설치․제작 상세도 완료 시점 등 1회 이상 중간보고를

하여야 한다.

ㅇ수시보고: 발주기관의 요청이 있거나 사업자가 주요 결정사항에 있어

필요한 경우에 수시 보고하여야 한다.

ㅇ최종보고: 사업자는 준공일 이후 7일 이내까지 과업수행 결과에 대해

발주기관에 최종 보고하여야 한다.

2) 업무보고

ㅇ주간 공정보고: 사업자는 매주 과업수행 사항을 지정한 요일에 발주기관(감독관)에게

주간 업무보고서를 제출하여야 한다.(협의 후 결정)

ㅇ월간 공정보고: 사업자는 본 과업에 대한 업무수행 사항을 매월 지정한 일자에

발주기관(감독관)에게 월간 공정보고서를 제출하여야 한다.(협의 후 결정)

ㅇ설계를 담당하는 총괄책임자 및 공정별 책임자는 전시연출 및 전시물 제작․

설치 전 과정을 전담하여 관리하여야 한다. 다만, 불가피한 사유가 있을 경우에는

발주기관과 협의하여 책임자를 변경할 수 있다.

ㅇ사업자는 본 제안요청서에 따라 전시연출 및 전시물 설계도서를 제작하고, 계약서에 정한 기일에 완료하여야 한다.

ㅇ사업자는 기획 전에 공정별로 관련 분야 전문가를 자문위원으로 지정하여

발주기관의 승인을 받은 후 자문위원회를 구성․운영하여야 한다. 이에

소요되는 비용은 사업자가 부담하여야 한다.(필요 시 적용)

ㅇ전시연출 및 설계도서 납품 시 산출 내역은 기획재정부장관이 고시한 정부회계원가계산 용역기관에 사업자가 비용을 부담하여 원가계산을 검토 완료하여 내역서를 제출하여야 하며, 과잉설계, 부실설계 등의 부분과 변경된 내용에 대하여는 발주기관의 요구에 따라 조치하여야 한다.

ㅇ사업수행 중 또는 준공 후에라도 사업 목적물이 본 제안요청서 및 계약문서에

규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주기관이 보완을

지시할 수 있으며 소요되는 모든 경비는 사업자가 부담하여 보완․수정하여야 한다.

ㅇ본 사업에 필요한 관련 인․허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우 이에 대한

처리 및 소요비용은 사업자가 부담하여야 한다.

ㅇ본 사업수행과 관련된 제안서 작성 등 제반 소요비용은 사업자가 부담하여야 한다.

ㅇ도서 납품 목록

순번	구 분	규 격	수 량	비 고
1	완료보고서	A4	1부
2	상세도 도면(통합본/공정별)	A3	각 3부
3	계산서(공정별)	A4	각 1부
4	내역서(통합본/공정별)	A4	각 1부
5	수량산출서(통합본/공정별)	A4	각 1부
6	단가산출서(통합본/공정별)	A4	각 1부	견적서 포함
7	일위대가(통합본/공정별)	A4	각 1부
8	품질시험 검사보고서	A4	각 1부
9	표준시방서	A4	1부
10	특기시방서	A4	1부
11	자재, 장비사양서	A4	1부
12	관리운영·유지관리계획서	A4	1부
13	투시도(실별)	A3	1부
14	공정표	A3	1부
15	USB로 제출 *영상․음향물 구동 SW, UI 복구파일 등 1.프로그램 원본(디자인 포함) 납품 2.소프트웨어 원본(디자인 포함) 납품		2SET	전 공정 포함
기 타		발주기관 요구사항		필요 시

※ 상기 납품 목록은 발주기관과 협의하여 조정 가능

Ⅲ		제안서 작성 요령 및 유의사항

1		제출 도서 종류 및 규격

연번	도서명	규격 및 양식	비고
1	기술능력 제안서	⋅규격은 A3(420㎜×297㎜), 횡으로 작성 ⋅30페이지 이내로 작성	표지, 목차, 간지 등 제외
2	사업수행능력 평가서	⋅규격은 A4(210㎜×297㎜), 종으로 작성 ⋅30페이지 이내로 작성	표지, 목차, 간지 등 제외
3	평가용 발표자료	⋅제안서 내용을 중심으로 한 발표 자료는 20분 이내 발표할 수 있도록 PPT 또는 PDF(16:9 화면비율) 파일로 작성	20분 발표 10분 질의응답

※ 발주기관의 요구가 있을 시 제안서 내용을 보강하여 추가 제출토록 한다.

2		제출 도서의 작성 방법 및 작성목차

가. 공통 사항

1) 모든 도서의 표지와 내용 지는 백색을 사용한다.

2) 표지에는 제목을 표기하고 표지에는 회사명을 흑색으로 표기한다. 단, 회사명을 삭제할 수 있는 파일로 제출하여야 한다.  <서식 제1호> 참조

나. 기술능력 제안서

2) 제출 도서 표지에 (대표) 업체명을 기재하여 제출하되, 업체명을 삭제 가능한 파일로 제출하여야 한다.

3) 규격은 A3(420×297㎜) 크기를 횡으로 작성한다.

4) 분량은 30페이지 이내로 작성(표지 및 목차, 간지는 쪽수에서 제외)하고, 색채 사용이 가능하다.

5) 제안서는 기본적으로 표지, 목차를 포함하여 아래의 방법에 따라 작성해야 하며, 쪽 번호는 하단 중앙에 표기한다.

① 항목부호는 「Ⅰ」, 「1」, 「1)」, 「①」,「ⅰ)」 순으로 기입

구 분	항 목 부 호
첫째 항목 둘째 항목 셋째 항목 넷째 항목 다섯째 항목	Ⅰ., Ⅱ., Ⅲ., Ⅳ. ․․․ 1., 2., 3., 4., ․․․ 1), 2), 3), 4), ․․․ ①, ②, ③, ④, ․․․ ⅰ), ⅱ), ⅲ), ⅳ), ․․․

② 목차 항목 중 해당내용이 없을 시, 해당항목에「해당사항 없음」으로 간략히 서술한다.

③ 글자체는 제목이나 중간 목차 등은 헤드라인 M체, 본문은 휴먼명조체, 본문 중간에 참고내용을 넣거나 구체적인 수치 등을 표시하고자 할 때는 중고딕체로 작성한다.

④ 글자 크기는 문서제목 20포인트, 본문은 15포인트, 중간 참고 내용은 14포인트로 하되, 필요에 따라 글자 크기에 변형을 줄 수 있다.

6) 제안서의 내용은 아래에 제시된 목차에 근거해 작성하고, 제안업체가 선택적으로 내용을 추가할 수 있다.

<기술능력 제안서 작성 목차> (권장 사항)

Ⅰ. 사업의 이해

1. 사업목적 및 내용

2. 전시구성

3. 전시개요

Ⅱ. 공간 구성 계획

1. 전시 기본 구획 및 동선(관람, 피난, 휴게 공간 등을 포함)

2. 기획전 공간 구성

ㅇ 프롤로그, 1주제, 2주제, 에필로그 등

3. 공간별 색채구성 및 마감 재료 등 계획

Ⅲ. 전시기법 및 연출계획

<전체 개요>

1. 전시 연출의 효과적 구현 방향

2. 전시주제별 전시물 배치(디스플레이 방안 등)

3. 전시물의 항온항습 유지 방안

4. 진열장(유리 포함) 사용의 적합성, 안정성

5. 조명(편의성, 안전성 등) 계획 및 기법

6. 영상 ․ 음향 체험물(창의성, 적절성)의 연출 및 제작 방안

7. 사인물, 패널, 명제표 등의 그래픽 및 전시공간과의 조화

Ⅳ. 전시 매체 계획

<전체 개요>

1. 영상 ․ 음향물 HW 구입

ㅇ HW  장비 및 주요 기자재 품질

2. 영상 ․ 음향물 HW 설치 방안

3. 영상 ․ 음향 ․ 정보 SW 연계 재생

※ 전문적이고, 다채로운 음향 감상 HW 체험 요구

4. 영상 ․ 음향물 등의 소리 간섭에 따른 흡음

5. HW 통제시스템 적정성

Ⅴ. 유지관리 및 운영계획

1. 사업수행 일정(공정), 수행방법의 타당성

2. 사후관리 및 운영(하자보수 등)

3. 기술이전 및 마케팅 홍보계획 등 지원계획

다. 사업수행능력 평가서

1) 회사소개서는 제안서와는 별도로 대표업체와 공동업체가 1개 단일본으로 통합하여 제출한다.

2) 페이지 번호는 하단 중앙에 표기하고 전체 페이지 수는 표지와 목차를 포함하여 단면 인쇄 30쪽 이내로 제작하되, 증빙서류는 페이지 수에서 제외한다.

3) 사업수행능력 평가서에 기입 된 일반현황 및 연혁, 기술능력, 근무 인력 현황 등을 아래 목차에 따라 간략히 정리하여 기입한다.

<작성 목차>

목 차	세 부 내 용	비 고
1. 일반현황 및 연혁	ㅇ 제안업체 일반현황 및 연혁을 명료하게 제시	<서식 제3호>
2. 기업신용평가	ㅇ 사업자의 경영상태(신용평가등급)	<서식 제5호>
3. 기술인력 보유상태	ㅇ 사업수행 전문 인력 보유현황	<서식 제6-10호>
4. 공동수급현황 (공동수급체 구성시)	ㅇ 공동수급체결현황, 협정서 사본	<서식 제11-14호>

※ 사업수행능력 평가서(업체 현황 및 사업수행 방안)는 별지 서식 참조

라. 평가용 설명자료 작성방법

1) 20분 이내 발표할 수 있는 PPT 또는 PDF를 이용, 10분 간 질의 응답을 하여야 한다.

2) 설명자료는 제안서에 수록된 내용(구분)으로 구성하고, 설명자료 목차에는 제안서의 내용이 기재되어 있는 페이지를 표기하여야 한다.

3) 제안 내용 발표는 제안서를 제출한 입찰참가업체의 대표자 또는 임직원(6개월 이상 당해 업체에 근무자)이 직접 발표하여야 함

마. 제출사항

1) 기술능력 제안서, 사업수행능력평가서, 평가용 설명자료의 내용 등을 모두 수록하여 제출한다.

3		제안요청서의 성격 및 효력

가. 제안사의 성격

1) 본 제안요청서(과업 내용 및 지침포함)의 내용은 발주기관과 제안사(계약체결 이후에는 사업시행자)간의 적법한 협의 또는 발주기관의 내부사정에 따라 수정․변경될 수 있다.

2) 본 제안요청서의 내용은 사업자 선정에 필요한 최소한의 요구사항을 기술한 것이며, 제안서 작성 및 사업추진에 따른 제반 사항 모두를 상세히 기술한 것은 아니다.

3) 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업에 반드시 필요하다고 인정되는 사항은 발주기관과 협의하여 과업 범위에 포함하여야 한다.

4) 제안요청서에 대한 질의 답변 사항은 모든 제안사에게 동일한 효력을 발휘한다.

나. 제안사의 효력

1) 제안서에 명시된 내용과 협상 시 발주기관(국립국악원)의 요구에 의하여 수정․보완․변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술능력평가를 위한 제안 설명 및 답변자료 포함) 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선하여야 한다.

2) 발주기관의 조치 또는 기타 불가항력적인 환경변화로 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못한다.

3) 발주기관은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 발휘한다.

4) 제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있다.

4		제안서 작성 요령

가. 제안서는 각 페이지별로 페이지 하단 중앙에 일련번호(1, 2, 3)를 붙인다.

나. 표기는 한글과 아라비아 숫자를 원칙으로 하고 단위는 미터법으로 하되, 필요 시 한문 및 영문은 괄호 안에 넣어 표기할 수 있고 영문 약어에 대해서는 약어표를 제공하여야 한다.

다. 제안서의 모든 내용은 실현 가능한 범위 내에서 명료하게 작성되어야 하며, 근거자료 및 보충자료 요구 시 제출하여야 한다.

라. “~를 할 수도 있다”,“~를 고려하고 있다”등과 같이 불명확한 표현은 사용할 수 없다.

마. 제안서 작성 시 필요하다고 판단되는 내용은 추가할 수 있다.

바. 제안 내용의 근거자료 및 참고자료 등을 첨부하여야 하며, 특히 기술적인 검증이 필요한 경우에는 가능한 공인 검증자료를 제출하여야 한다.

사. 제안내용에 대한 확인 및 검증이 필요하다고 판단될 경우 발주기관에서 제안업체에게 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

5		유의사항

가. 제출된 서류 중 내용이 허위임이 발견되거나 서류 작성이 현저히 부실하여 객관적인 평가가 어렵다고 판단될 경우에는 평가에서 제외한다.

나. 제안 내용의 확인을 위하여 현지실사를 할 수 있으며, 제안업체는 이에 응하여야 한다.

다. 기술인력 보유현황에 기재된 기술자는 반드시 과업 수행에 참여하여야 하며, 당해 과업에 참여하지 아니하는 경우 그 인원이 업체 선정의 중요한 요소인 경우에는 계약 해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다. 단, 퇴직․질병 등의 사유로 부득이 구성원을 변경할 경우에는 미리 서면으로 발주기관의 승인을 얻어 당초 구성원과 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을 가진 자를 배치하여야 한다.

라. 제안서 작성 ․ 제출 시에는 반드시 발주기관이 지정한 제안서 규격, 작성 순서(서식)에 의거하며 제출한다.

마. 제안서는 제출 요구 시한 내에 접수된 것만 유효하다.

바. 제안서는 성실과 신의의 원칙에 의해 작성하여야 하며, 만약 기재사항이 잘못 또는 허위 기재 사실이 발견될 경우에는 법령에 따라 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 둔다.

사. 발주기관이 필요시 제안업체에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있다.

Ⅳ		제안서 평가 및 협상

1		제안서 평가일정 및 방법

가. 평가 일정: 추진 일정에 따름

나. 평가위원회 구성

1) 제안서의 공정한 평가를 위하여 각계 관련분야 전문가로 구성된 평가위원회를 구성⋅운영한다.

2) 기술능력평가는 조달청「협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준(조달청지침 제1929호, 2020.7.9.)」에 따라 평가위원(6인 이상)을 구성하며,‘제안서 기술능력 평가기준 및 배점’에 따라 평가한다.

3) 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 공개하지 아니한다.

다. 평가방법

1) 제안서 평가는 기술능력평가와 가격평가로 구분하며, 기술능력평가는 정량적 평가(사업수행능력 평가)와 정성적 평가(기술능력제안서 평가)로 구분하여 실시한다.

2) 제안서의 평가는 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 90점(정량적 평가 10점, 정성적 평가 80점), 입찰가격평가 10점으로 배점하여 평가한다.

3) 평가위원회는 소정의 세부평가기준에 의하여 기술능력평가(정성적 평가)를 실시한다.

4) 정성적 평가는 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수 ․ 최저점수를 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

5) 최고점 또는 최저점이 두 개 이상 중복될 경우 한 개의 점수만 제외한다.

6) 사업수행능력 평가는 정량적 지표에 의한 평가로서 발주기관에서 정한 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정한다.

7) 협상적격자 선정은 기술능력평가와 입찰가격평가를 종합평가한 결과 고득점자순으로 한다.

※ 기술능력평가 배점한도(90점)의 85%(76.5점) 이상인 제안업체를 협상적격자로 선정한다.

8) 합산점수가 동일한 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 제안업체를 우선 순위자로 하며, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 제안업체를 우선 순위자로 한다.

2		제안서 설명회 개최

가. 제안서 발표

1) 제안서의 평가를 위하여 발주기관에서 지정하는 일시와 장소에서 제안서 설명회를 실시하며, 제안서 설명회 일시 및 장소는 제안서 제출 업체 한하여 발주기관에서 별도로 정하여 통보한다.

2) 제안서 설명회는 제안업체의 관계 임원, 과업 총괄책임자를 포함한 2인 이내로 제한하며, 발표는 평가용 설명자료를 통해 제안업체 관계 임직원이 직접 발표하는 방식으로 진행한다.

3) 발표순서는 제안서를 접수한 “제안업체” 순서로 진행한다.

4) 발표는 제안서 접수 시 제출한 접수자료로 진행한다.

5) 제안서 설명회에 사용하는 장비(빔프로젝트, PC 등)는 발주기관에서 제공하는 장비를 사용하여야 한다.

6) 본 제안서 작성 및 제출에 소요되는 비용은 제안업체의 부담으로 한다.

7) 제안서 발표는 20분 이내로 제한하고, 질의 ․ 응답은 총 10분 이내로 한다.

나. 제안업체 준수사항

1) 제안업체는 제안서를 포함한 모든 문서를 낙찰자 결정 시까지 대외비로 취급하여야 하며, 제안업체 관계자 이외의 제3자에게 공개하여서는 안된다.

2) 발주기관에서 작성한 제안요청서 및 관련 자료는 제안업체의 제안서 작성 이외의 목적으로는 사용할 수 없다.

3) 입찰 과정 및 제안서 작성 및 제출, 발표 과정 중에서 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보를 발주기관의 사전 승인 없이 누설하여서는 안된다.

4) 제출한 모든 제안서는 평가위원 ․ 담당자 및 업무실무자 외에 제3자에게 해당 업체의 권익 보호 차원에서 비공개를 원칙으로 한다.

5) 제안업체는 사업 범위에 의거 사업 수행 기간 중 산출되는 각종 산출물 내역을 상세히 제시하여야 한다.

6) 본 제안요청서에서 거론되지 아니한 사항에 대해서는「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」과 기획재정부 계약예규「협상에 의한 계약 체결 기준」을 적용한다.

3		제안서 평가항목

가. 평가항목 및 배점

구 분		평가 항목	평가 요소	배 점
기술능력 평 가	정 량 적 평 가 [사업수행능력 평가] (10점)	① 기업신용평가	▪사업자의 경영상태(신용평가등급)	5	10
		② 기술인력 보유상태	▪사업수행 전문 인력 보유현황	5
	정 성 적 평 가 [기술능력 제안서 평가] (80점)	① 사업의 이해	▪전시 구축 및 내용의 이해도	5	10
			▪전시 연출의 스토리 구성 및 가능성	5
		② 공간구성계획	▪공간 구성의 창의성 및 효율성 ▪동선(열람, 피난, 휴게 공간 등)의 적정성	10	15
			▪공간별 디자인 방안, 색채구성 등 사용계획	5
		③ 전시 기획 및 연출기법	▪기획전 연출의 효과적 구현 방향 ▪전시주제별 전시물 배치 ▪조명 계획 및 기법 ▪사인물, 패널, 명제표 등의 그래픽 ▪영상․음향 감상 체험물의 연출 및 제작 방안 ▪전시물의 항온항습 유지 방안	30	30
		④ 전시매체계획	▪영상·음향·정보 SW 연계 재생 방안 ▪전시물과 조화를 이루는 HW 설피 최적화 방안	10	15
			▪소리간섭에 따른 흡음 방안 ▪HW 통제시스템 적정성	5
		⑤ 유지관리 및 운영계획	▪사업수행 공정 ▪수행방법의 타당성 (인력,기술,자재수급 등 통합 관리 체계)	5	10
			▪사후관리 및 운영(하자보수 등)의 용이성 ▪기술이전 및 지원계획 적절성	5
소 계				90	90
가격 평가	입찰가격 평가 (10점)	-	-	10	10
합 계				100	100

나. 기술능력 평가(90점)

1) 기술능력제안서 평가(정성적 평가, 80점)

구 분		평가 항목	평가 요소	배 점
기술능력 평 가	정 량 적 평 가 [사업수행능력 평가] (10점)	① 기업신용평가	▪사업자의 경영상태(신용평가등급)	5	10
		② 기술인력 보유상태	▪사업수행 전문 인력 보유현황	5
	정 성 적 평 가 [기술능력 제안서 평가] (80점)	① 사업의 이해	▪전시장 구축 및 내용의 이해도	5	10
			▪전시 연출의 스토리 구성 및 가능성	5
		② 공간구성계획	▪공간 구성의 창의성 및 효율성 ▪동선(열람, 피난, 휴게 공간 등)의 적정성	10	15
			▪공간별 디자인 방안, 색채구성 등 사용계획	5
		③ 전시 기획 및 연출기법	▪전시연출의 효과적 구현 방향 ▪전시주제별 전시물 배치 ▪조명 계획 및 기법 ▪사인물, 패널, 명제표 등의 그래픽 ▪영상․음향 감상 체험물의 연출 및 제작 방안 ▪전시물의 항온항습 유지 방안	30	30
		④ 전시매체계획	▪영상·음향·정보 SW 연계 재생 방안 ▪전시물과 조화를 이루는 HW 설피 최적화 방안	10	15
			▪소리간섭에 따른 흡음 방안 ▪HW 통제시스템 적정성	5
		⑤ 유지관리 및 운영계획	▪사업수행 공정 ▪수행방법의 타당성 (인력,기술,자재수급 등 통합 관리 체계)	5	10
			▪사후관리 및 운영(하자보수 등)의 용이성 ▪기술이전 및 지원계획 적절성	5
합 계				90	90

2) 기술능력제안서 평가 방법

기술능력제안서에 대한 평가는 각 평가항목별 배점기준으로 A(100%), B(90%), C(80%), D(70%), E(60%)하며 평가점수 산출은 [배점×A(100%), B(90%), C(80%), D(70%), E(60%)]로 하여 평가위원의 평가항목별 점수 합계를 평균한다.

3) 사업수행능력 평가(정량적 평가, 10점)

구 분	평가항목	평가요소	배 점
정 량 적 평 가 [사업수행능력 평가] (10점)	① 기업신용평가	▪사업자의 경영상태(신용평가등급)	5
	② 기술인력 보유상태	▪사업수행 전문인력 보유현황	5
합 계			10

가) 기업신용평가(신용평가등급) 평가(5점)

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평 점
AAA		AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	A (5.0점)
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급)
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	B (4.7점)
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	C (4.4점)
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	D (4.1점)
CCC+ 이하 또는 미제출	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	E (3.8점)

①「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항 제1호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

②‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

③ 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

④ 제안사가 신용평가등급 자료 제출이 불가하거나 제출하지 않는 경우 가장 낮은 등급으로 심사한다.

나) 기술인력 보유상태 평가(5점)

① 자격 및 등급 배점 기준

평가 항목	평가 요소	배점	평가방법				비 고
참여 기술자	등급 및 인원	5.0	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	발주기관 평가
			0.5	0.45	0.4	0.35
			○ 평점 = 인원 × 기술자별 점수 ※ 최고 배점 5점을 초과할 수 없음

② 각 기술인력 등급별 인원수와 그 등급에 배정된 점수를 곱한 값을 단순 합산하여 산출한다(최고 5점).

③ 기술자에 대한 등급은 과학기술부 공고“엔지니어링사업대가의 기준”의 기술자 등급 및 자격 기준에 의함

※ 공고일 기준 3개월 이상 해당 업체에서 근무하고 있는 기술자만 해당

: 재직증명서, 공인기관 인증자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 첨부 (필요할 경우 경력증명서 포함)

4		입찰가격 평가

: 조달청 평가

구 분	주요 평가 기준	배 점	비 고
입찰가격	“법령 기준에 따름”	10

5		협상대상자 선정 및 협상

가. 협상대상자 선정

1) 기술능력평가와 입찰가격을 종합평가하여 고득점자 순으로 협상적격자로 선정하여 고득점자 순으로 협상을 실시한다. 다만, 기술능력평가 배점한도의  85% 미만인 자는 협상대상에서 제외한다.

2) 평가결과 합산점수가 동일한 제안업체가 2개 업체 이상일 경우는 기술능력평가점수가 높은 제안업체를 우선 순위자로 하며, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 제안업체를 우선 순위자로 한다.

3) 협상적격자와 협상순위가 결정되면 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 개별 통보한다.

나. 협상 진행

1) 협상의 내용과 범위

가) 우선순위 협상대상자로 선정된 제안업체가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행 일정, 제시가격 등 제안서 내용을 대상으로 협상을 실시하며, 협상을 통해 그 내용의 일부 또는 예산 범위 내에서 조정할 수 있다.

나) 사업자는 발주기관의 요구사항을 반영하여 전시연출 및 전시실 제작 ‧ 설치 설계 도서를 작성하여 계약일로부터 30일 이내에 제출하되, 기간은 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.

2) 가격 협상

가) 가격 협상시 기준가격은 해당 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)이하로써 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

나) 협상대상자가 제안한 내용을 가감 조정하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당사업 추정금액 범위 내에서 조정할 수 있다.

3) 협상 기간

가) 협상이 성립된 후 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 한다.

4) 협상 순서

가) 우선순위 협상대상자와 협상이 성립된 때에는 차순위 협상대상자와는 협상을 실시하지 아니한다.

나) 우선순위 협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

다. 사업자 결정 및 계약

1) 협상이 성립된 후 협상적격자가 사업자(낙찰자)로 결정되면 특별한 사유가 없는 한 10일 이내 계약을 체결하여야 한다.

2) 계약의 체결 및 이행에 관하여는 서면 통보한 협상결과와 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 동법 시행령 및 시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

6		소유권 및 지적재산권 귀속

가. 당선 사업자 제안서

해당 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 한다.

나. 제안업체 제안도서 반환

1) 제안업체가 제안도서의 반환을 요청시 평가에 이용된 제안 설명서는 제외한다.

2) 반환 청구기간은 사업자 선정 발표 후 5일 이내로 한다.

3) 반환청구 기간 내 청구하지 아니한 제안도서는 발주기관에서 임의 파기한다.

4) 제안도서 반환에 따른 제반 비용은 제안업체의 부담으로 한다.

5) 제안도서의 보관상의 파손 등에 대하여 반환 시 이의를 제기할 수 없다.

7		과업 수행 인원

가. 사업 총괄 책임자 및 과업 수행 인원에 관련된 사항은 반드시 포함되어야 하고, 계약 성립 후 이 사항을 변경하고자 할 때에는 기존 과업 수행 인원과 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어 사전에 발주기관의 허락을 받아야 한다. 이를 위반할 시에는 계약 해지 등의 사유가 될 수 있다.

나. 계약 성립 후, 발주기관이 판단하여 과업수행에 지장을 초래하는 사업 총괄책임자 및 수행 인원에 대한 변경 요청이 있을 경우 사업자는 이에 응하여야 한다.

8		기타 유의사항

가. 본 제안요청서의 내용은 사업자 선정에 필요한 기본적인 요구사항을 기술한 것으로, 사업에 필요한 제반 사항은 추후별도 협의에 의하여 정한다.

나. 제안서에 명기된 내용과 협상 시 발주기관의 요구에 의하여 수정 ․ 보완 ․ 변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술능력평가를 위한 제안 설명 및 답변자료 포함) 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

다. 추가 자료 요청시 제안업체는 이에 성실히 임해야 하며, 미제출시 불이익은 제안업체가 책임진다.

라. 제출된 서류의 위 ․ 변조나 제안내용에 허위사실 등이 발견된 경우 법령에 따라 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 둔다.

마.

바. 본 제안요청서는 발주기관의 성격과 과업 범위를 이해하는데 필요한 자료이며, 전시계획에 대한 수정, 보완, 추가, 조정 등이 필요한 경우에는 발주기관과 사업자의 협의에 따라 전시설계에 반영하여 진행한다.

사. 협상이 성립되어 사업자로 결정된 업체는 동 전시설계 및 전시물 제작 ․ 설치에 필요한 모든 자격과 조건을 갖추고 있어야 한다.

아. 사업자는 전시계획을 발주기관의 설계심사 ․ 자문, 기타 발주기관의 검토 결과에 따라 설계 보완이 필요할 때 추가 ․ 삭제 ․ 수정 ․ 보완 ․ 변경에 응한다.

자. 사업자는 발주기관이 작성한 제안요청서에 따라 설계를 수행하여야 하고, 성과품(도면, 시방서, 내역서, 설계 설명서 등) 납품은 과업 기간 이내에 완료하여야 한다.

차. 전시물 제작 및 설치는 발주기관의 국악라키비움 연출 및 전시물 제작 ․ 설치 설계도서의 승인을 득한 후 시행토록 한다.

카. 사업자가 전시연출 및 제작 ․ 설치 설계도서를 납품 할 때에는 발주기관에서 제시한 실시설계도를 검토하여야 하며 비용은 사업자 부담으로 한다.

타. 본 제안요청서에 명기되지 않은 사항에 대해서는 관계 법령과 발주기관과 사업자 상호 협의에 의한다.

☞ 안내 및 문의 : 국립국악원 국악연구실 권용현

Tel: 02-580-3073

Fax: 02-580-3079

E-mail: kwonyh79@korea.kr

별첨: 제안서 제출 관련 서식

*제안서 제출 관련 각종 서식 목록

서식번호	서식명
서식 제1호	기술능력제안서 표지
서식 제2호	업체현황 표지
서식 제3호	제안업체 일반현황 및 연혁
서식 제4호	제안응모 대표자 선임계
서식 제5호	인력 보유 현황
서식 제6호	사업수행 조직 및 인원 구성
서식 제7호	참여인력 현황 총괄표
서식 제8호	참여인력(대표, 총괄책임자, 제작자, 관리자) 이력사항 및 증빙 서류
서식 제8-1호	참여인력 이력사항 및 증빙 서류
서식 제9호	공동수급협정 현황
서식 제9-1호	공동수급표준협정서(공동이행방식)
서식 제9-2호	공동수급 합의 각서
서식 제10호	사용인감계
서식 제11호	제안업체 경영 상태
서식 제11-1호	신용평가등급 확인서
서식 제12호	행정처분 확인서
서식 제13호	사업수행능력 자가 평가표
서식 제14호	확약서
서식 제15호	위임장
서식 제16호	서면질의서
서식 제17호	청렴계약이행서약서
서식 제18호	개인정보 수집‧이용‧제공 동의서

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정이 무효화됨을 알려드립니다.

【서식 제1호】

기술능력제안서 표지 양식

		「국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 전시물 제작·설치 용역」														16p 장평 95
		제 안 서														35p 장평 95
			(중앙정렬)
					16		2022년 월 일					16
							(중앙정렬)
				16		인식명칭		--							16
						40		16	16	16	16		16

주) 1. 표지크기 : A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 휴먼명조체, 흑색사용

4. 글자크기 : 제목(HY헤드라인M) 16P, 35P, 날짜 16P, 식별번호 16P

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

【서식 제2호】

	-

『국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 전시물 제작·설치 용역』

업 체 현 황

업 체 명 :

대 표 자 :

주    소 :

전화번호 :            (FAX :              )

작 성 자 :            (연락처 : 휴대 전화 / 이메일 기재)

【서식 제3호】

제안업체 일반현황 및 연혁

회사명		대 표 자
사업분야 (사업자등록증 표기)		사업자번호
주 소
전화번호		FAX 번호
홈페이지 주소		E-mail
회사설립 연도	년 월	자 본 금
면허/허가/ 등록증 보유현황
인력구성현황	총 명
해당부문 사업기간	년 월 ~ 2022년 월 공고일 현재 ( 년 개월)
주요 연혁(요약)

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유 시에는 공장등록증 사본 첨부

【서식 제4호】

제안응모 대표자 선임계

응모자 (대표자)	업체명 (대표자)	(인)	주민 등록번호		연락처	직장
						자택
	소재지
						휴대 전화

상기인을 국립국악원에서 시행하는 <국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 전시물 제작·설치> 용역을 위한 제안서 응모의 대표자로 선임하고 제안에 관한 모든 권한을 공동제안대표자에게 위임합니다.

□ 참여회사 명단

회사명	대표자 성 명	분 야	주 소	연락처	날 인

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두 날인

국립국악원장 귀하

【서식 제5호】

인력 보유 현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고

※ 기술자의 구분은 「2022년 적용 SW기술자 평균 임금 공표」를 따름

※ 재직증명서, 자격증, 최종학교 졸업증명서, 경력증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서 등 필요한 증명서류 첨부

※ 증명사본 첨부(입찰공고일 이전에 등록된 기술만 인정함)

【서식 제6호】

사업 수행조직 및 인원 구성

1. 제안사의 조직 및 인원 현황

2. 사업수행 조직 및 인원 현황

			총 괄 책 임 자
			소속, 직위, 성명
○○부문			○○부문				○○부문			○○부문
소속, 직위, 성명, 담당업무			소속, 직위, 성명, 담당업무				소속, 직위, 성명, 담당업무			소속, 직위, 성명, 담당업무

※ 분야별 책임자를 명시하고, 직위 순으로 기재한다.

※ 본 수행조직에 등록된 자는 반드시 사업에 투입되어야 한다.

※ 총괄책임자는 용역 전 부문을 총괄할 수 있는 자로 한다.

【서식 제7호】

참여인력 현황 총괄표

(제출일 기준)

구분	성명	담당 업무	투입 기간	해당분야 업무경력	주요활동내용 (최종학력, 해당분야 자격증 등)	참여율	비고

※ 본 용역에 투입할 전체 인력(채용 예정인력 포함)에 대해 기재하시기 바랍니다.

※ 구분란에는 팀장, 팀원(해당업체 조직구성에 따라 표기) 등으로 구분 기재하며, 총괄책임자 1명과 콘텐츠별 책임자(제작자, 관리자) 각 1명을 포함해 작성하시기 바랍니다.

※ 본 사업에 직접 참여하는 종사자를 대상으로 작성(주민등록번호 미기재)하되, 이를 증빙할 수 있는 서류(경력증명서, 재직증명서, 국민연금, 건강보험증 사본) 첨부

※ 참여인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성해야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위 작성이 판명될 경우, 평가 후일 지라도 계약업체 선정을 무효화할 수 있음

【서식 제8호】

참여인력(대표, 총괄책임자, 제작자, 관리자) 이력사항

가. 인적사항

소 속							부서 및 직위
성 명	국 문				(한문)			국 적
	영 문							생년월일
주 소	자 택							전 화		- -
								휴대폰		- -
	직 장							FAX		- -
								E-Mail
본 용역 참여임무				사업 참여기간					참여율

나. 학 력

기 간		학 력		학 위
부터	까지	대학교/대학원	전공
년 월	년 월
년 월	년 월

다. 경 력

기 간		근무기관	직위(직명)	비 고
부터	까지
년 월	년 월
년 월	년 월

라. 주요과제수행업적(최근 5년간 본 과제와 관련 있는 업적만 기재)

과제명	주요 실적	참여기간	과제수행 당시 소속기관	역 할	발주처	비 고

※ 본 과제와 직접 관련된 수행업적에 한하여 표기하며, 주요실적에는 특허출원․등록, 사업화 성공 등을 기재

※ 정부지원사업은 전부 기재하고 누락될 시 탈락 조치될 수 있음

※ 역할란에는 총괄책임자, 수행자 중 택일하여 기재함

【서식 제8-1호】

참여인력 이력사항

※ 제안사 대표, 총괄책임자, 제작자, 관리자를 제외한 인력 작성

※ 사업별로 참여율 기재

※ 경력란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

※ 허위 작성 시 국가계약법 시행령 76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자

의 입찰참가자격 제한기준]에 의거 입찰참가자격 제한 조치

성 명			업 체		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				해당분야 근무경력		년 개월
	대학원 전공				학위 및 자격증
본용역참여임무				용역참여기간			참여율	%

경 력 사 항 (자격취득이후 사항 기재)
용 역 명	참 여 기 간 (년.월～년.월)	담 당 업 무 (본 사업과 관련분야)	발주처	비고

※ 경력사항은 본 사업과 밀접한 경력 순으로 기재

※ ‘담당업무’는 본 사업과 관련된 분야 위주로 작성

※ ‘비고’란은 해당 사업 참여시 담당한 역할 기재

【서식 제9호】

공동수급협정 현황

구 분	업체명	주 소	대표자	전화	출자비율(%)	비고
공동이행
계

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두 날인

※ 공동수급협정서 사본 첨부

2022년  월  일

(인)

(인)

(인)

국립국악원장 귀하

【서식 제9-1호】

공동수급표준협정서 (공동이행방식)

(계약예규) 공동계약운용요령[시행 2019. 1. 1.]

[기획재정부계약예규 제410호, 2018. 12. 31., 일부개정]

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대해 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 : ※기재하지 말 것

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :                소재지 :                           )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :                소재지 :                           )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주기관 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명‧날인과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2022년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

국립국악원장 귀하

【서식 제9-2호】

공동수급 합의 각서

입찰공고번호	제 호	입 찰 일 자	2022년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종조건, 제안요청서 및 입찰공고사항 등을 전적으로 승낙하며 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 결의하였기에 본 합의각서를 제출합니다.

2022년  월   일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :              (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

공동수급체 구성원

주사무소 소재지 :

상           호 :

성           명 :               (인)

사업자 등록번호 :

주민 등록  번호 :

국립국악원장 귀하

【서식 제10호】

사  용  인  감  계

『국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 전시물 제작 ‧ 설치』와 관련하여 당사가 사용하는 법인(개인)인감을 대신하여 계약 및 제반신고서류에 사용코자 다음과 같이 사용인감을 제출하오며 이로 인한 법률상의 모든 책임을 당사가 질 것을 확약합니다.

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두

사 용 인 감	인 적 사 항
	업체명 : 주 소 : 대표자 :

사 용 인 감	인 적 사 항
	업체명 : 주 소 : 대표자 :

붙임 : 인감(법인)증명서 1부.  끝.

2022.  .   .

국립국악원장 귀하

【서식 제11호】

제안업체 경영 상태

구 분	신용평가등급	비고
회사채에 대한 신용평가등급
기업어음에 대한 신용평가 등급

<유의사항>

※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급 중 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

※ 회사채, 기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급은 유효기간 내에 있는 것이어야 한다(유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우도 인정).

※ 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

※ 신용등급확인서 제출

【서식 제11-1호】

신용평가등급확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2022.   .   .

신용평가기관 :                           (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

【서식 제12호】

행정처분 확인서

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
지체상금 부과 또는 부정당업체 제재처분

※ 회사(응모자)가 관계법령에 의해 지체상금 부과 또는 부정당업체 제재 처분된 사실을 기재

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

【서식 제13호】

사업수행능력 자가 평가표

항 목	세 부 항 목		배 점	평 점	비 고
사업수행실적	누계실적	사업비 100% 이상	3.0점
		사업비 70%이상~100%미만	2.7점
		사업비 40%이상~70%미만	2.4점
		사업비 40%미만	2.1점
		상 한 점 수	3점
기술능력	특급기술자		각0.5점
	고급기술자		각0.4점
	중급기술자		각0.3점
	초급기술자		각0.2점
	상 한 점 수		3점
경영상태	기업 신용 평가 등급	AAA, AA+, AA0, AA-, A+A0, A-, BBB+, BBB0	2.0점
		BBB-, BB+, BB0, BB-	1.9점
		B+, B0, B-	1.8점
		CCC+ 이하	1.4점
	상 한 점 수		2점
사회적 책임	최저임금위반		△2.0점
	임금체불		△2.0점
	고용개선 조치 미이행		△2.0점
	상 한 점 수		2점
합 계			10점

※ 모든 증명자료는‘사실과 상위 없음’을 날인하여 붙임으로 첨부하여야 함. 증명첨부서류에 페이지를 명시하고, 위의 비고란에 증명첨부서류 페이지를 표시함.

【서식 제14호】

확   약   서

사업명: 국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 설계 용역

위 사업 입찰에 참여한 당 업체는 귀 국립국악원의 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 귀 국립국악원의 방침에 이의가 없음을 확약하며, 공정한 심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반 결정에 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

그리고 귀 국립국악원이 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠으며, 사업자 선정전까지도 귀 국립국악원의 추가요청 내용과 계약체결에 따른 증빙 서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 서약합니다.

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두 기재

2022년    월     일

주      소 :

업  체  명 :

대  표  자 :                   (인)

주      소 :

업  체  명 :

대  표  자 :                   (인)

국립국악원장 귀하

【서식 제15호】

위   임   장

본인은 ○○○업체의 대표로서 국립국악원에서 시행하는 <국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 설계 용역> 사업의 업체선정 입찰에 관한 모든 업무 권한을 아래 사람에게 위임합니다.

소       속 :

직       위 :

성       명 :

주민등록번호 :

2022.    .     .

업 체 명 :

대 표 자 :              (인)

국립국악원장 귀하

【서식 제16호】

서 면 질 의 서

접수번호 :

발송일시
업 체 명	대표자 : (인)
담 당 자	소 속 : 직 위 : 성 명 : (인)
연 락 처	전 화 : ( ) - FAX : ( ) -
제안요청서 page
질의내용
국립국악원장 귀하

【서식 제17호】

청렴계약이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 국립국악원에서 시행하는 「국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 설계」(물품) 입찰에 참여함에 있어 당사 및 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 국립국악원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 국립국악원 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 11개월 이상 1년 1개월 미만 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 국립국악원 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 5개월 이상 7개월 미만 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․낙찰 또는 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각호 각목의 1에 해당하는 기간 동안 국립국악원 등에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 2억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

2) 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

3) 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6개월

4) 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 3개월

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무수행하는 자를 포함)과 대리인이 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

6. 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 발주처에 손해를 가했을 경우 다음 각 호의 금액을 배상토록 하겠습니다.

1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액

2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 제안요청서 설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

3) 담합으로 인하여 당해 발주사업 기간의 연장이나 지연에 따라 발주처에 주는 직․간접적인 손해

4) 기타 발주처가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

5) 위 내용에도 불구하고 구체적인 손해액 산정이 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상토록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 국립국악원의 조치와 관련하여 당사가 국립국악원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

※ 공동수급 참여사의 대표자 모두 기재

2022.    .    .

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○○○ (서명 또는 날인)

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○○○ (서명 또는 날인)

국립국악원장 귀하

【서식 제18호】

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 국립국악원에서 시행하는 <국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 설계 용역> 사업의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - <국립국악원 국악박물관 기획전시 연출 및 설계 용역> 사업 입찰 참여에 따른 입찰서류(서식 제1호 ~ 서식 제17호) 확인을 위하여 최소정보를 수집하는데 활용. 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등. - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등. - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등. - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등. 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익: 계약체결 대상에서 제외. 2022년 월 일 국립국악원장 귀하