제 안 요 청 서

- [역병연대기(가제)] 특별전 전시연출 용역-

2021. 9.

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업책임자	학예연구관	전시운영과	최은수	02)3704-3151	ces5139@korea.kr
사업실무자	학예연구사	전시운영과	최미옥	02)3704-3157	hellocindy@korea.kr

- 목    차 -

Ⅰ. 사업개요	3

1. 사 업 명	3

2. 사업개요	3

3. 입찰 및 낙찰자 결정방법	4

4. 응모자격	4

5. 제안일정	5

6. 제출서류	5

Ⅱ. 제안지침	6

1. 기본지침	6

2. 세부지침	7

3. 제안서 작성요령	9

4. 유의사항	10

Ⅲ. 제안서 평가 및 협상	11

1. 제안서의 평가	11

2. 평가항목 및 평가기준	12

3. 협상과정	15

4. 저작권 및 사용권	15

5. 응모자의 실격	16

6. 무   효	16

7. 기   타	16

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명 : 「역병연대기(가제)」 특별전 전시연출 용역

2. 사업 개요

가. 사업목적 : 주요 역병이 사회와 개인의 일상에 미친 영향을 반추하고 전시를 통해 관람객으로 하여금 현대 팬데믹 상황에서 공동체의 역할과 중요성을 생각하는 계기 마련

나. 시설 현황 및 사업 연면적

○ 위       치 : 서울시 종로구 삼청로 37 국립민속박물관 기획전시실 Ⅰ

○ 전시실 면적 : 약 600㎡

다. 사업 범위

1) 전시 기획에 따른 전시 연출 실시설계(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

2) 전시연출을 위한 구조물 제작 설치(철거 포함)

3) 전시 진열장 제작 설치

4) 전시 받침대 제작 설치

5) 전시 그래픽 제작 설치

6) 전시연출 모형 등 설치(필요시)

7) 전기 및 조명 등 관련 설비 설치(천정 트랙을 제외한 진열장 및 연출코너)

8) 기타 사업에 수반되는 행정 소요 및 우리 관 요구사항

라. 사업 기간 : 계약체결일로부터 2021년 11월 16일까지 완료

※ 전시기간 : 2021년 11월 17일 ~ 2022년 3월 1일

1) 설        계 : 착수일로부터 10월 3주까지

2) 제작 및 설치 : 10월 18일 ~ 11월 8일

3) 전시품 디스플레이 : 11월 11일 ~ 15일

4) 전시실 시험운영 및 최종 점검 : 11월 15일

5) 전시 개막식 : 2021년 11월 16일 화요일(예정)

6) 준공서류 및 납품서류 제출 : ~ 2021. 11. 17

7) 전시물 철거 : 발주처와 협의하여 전시종료 후 철거 진행

※ 유물 디스플레이 기간 전까지 유물 반입할 수 있는 전시환경이 마련되어야 함

(그래픽, 영상 세팅 및 청소 포함 모든 공정 완료)

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 전시 철거시 까지

라. 사 업 비

1) 사업예산 : 210,000,000원(부가세 포함)

2) 설계, 전시물 제작·설치(전시장 포함), 제세공과금 등 기타 부대비용 일체 포함

마. 당선작 대우

○ 설계 및 제작·설치권 부여

3. 입찰 및 낙찰자 결정방법

○ 협상에 의한 계약(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제43조)

4. 응모자격 : 입찰공고에 따름

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 자격요건을 갖춘 사업자

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중․소기업․소상공인확인서(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여  반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 기타자유업(행사대행업)(업종코드 : 9901)을 등록한 자

○ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 의한 직접생산확인증명서(세부품명: 전시기획 및 대행서비스)를 소지한 자

○ 단독 또는 공동계약이 가능함. (공동이행방식)

*공동이행방식의 경우 사업수행평가는 참여업체 지분율에 따라 합산 평가함.

5. 제안일정

1) 조달청 계약의뢰 ............................... 2021. 8.

2) 입찰공고 게시 ................................... 입찰공고서 참조

3) 제안서 및 입찰서 제출 입찰공고서 참조 (※ 현장설명회 없음)

4) 제안서 평가 ....................................... 제안서 접수마감일로부터 10일 이내

5) 상기 일정은 조달청과 협의 과정에서 달라질 수 있음.

6. 제출서류

가. 제출요령

1) 응모작은 마감시간까지 e-발주시스템을 통해 제출해야 하며, 반드시 나라장터 또는 e-발주시스템에서 제안서 최종제출 여부를 확인하고, 최종적으로 제출한 파일을 다운로드하여 정상 여부를 확인하여야 한다.

2) 각 응모자는 1개의 응모작만을 제출할 수 있다.

3) 모든 서류에는 규정에 의한 것 이외의 표시를 금한다. 동 사항을 위반하여 심사위원회에서 불공정행위로 의결될 경우 실격처리 될 수 있다.

나. 제출서류 : 입찰공고서 반드시 참조

1) 기술제안서(A3 10매 / 내용 : 설계설명서, 설계도, 예정공정표) 1부

2) 사업수행능력평가서(A4/내용 : 서식1-서식14에 해당하는 응모서류) 1부

※ 제안서 등 제출서류는 나라장터를 통해 전자적으로 제출하여야 하며, 제출 서류 일체는 PDF파일 형식으로 총 용량 300MB를 초과할 수 없음.

Ⅱ. 제안지침

1. 기본지침

가. 기본방향

1) 본 사업인 「역병연대기(가제)」 특별전은 전시·체험 등을 바탕으로 한 스토리텔링 전시를 통해 관련된 유물, 관련 이미지 자료 영상물 등을 전시하는 것으로, 유물이 돋보이는 디스플레이 방식과 생동감 있는 현장재현 등의 연출방법으로 공간을 구성한다.

2) 프롤로그, 에필로그 및 각 부 공간이 변화된 구성과 신선한 전시연출로 재미있고 실감나는 전시가 될 수 있도록 공간계획 되어야 한다.

3) 전시시설물 설치 시 박물관 전시실의 기본구조가 훼손되지 않는 공법을 사용한다.

4) 유물보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 포름알데히드가 거의 검출되지 않는 최상급 친환경 자재를 사용한다. (필요시 진열장 내부에 광촉매 시공을 한다)

5) 전시철거 시 원상복구를 하며 필요시 전시실 도색을 한다.

나. 일반지침

1) 본 사업의 목적과 제안요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장여건을 고려하여 계획.

2) 전시물은 관련 규정 및 제반 규정에 적법하게 제작·설치될 수 있도록 계획.

3) 우리나라의 대표적인 국립박물관의 위상에 맞는 품위 있는 전시연출계획 수립.

4) 공공문화시설로서 노약자 및 장애자의 편익과 안전성을 도모하는 계획 수립.

5) 청소년 단체관람객의 전시실 관람시 안정성과 교육성이 고려된 계획 수립.

6) 외국인의 관람 편의성이 고려된 계획 수립.

7) 전시물은 예술성, 창작성, 통일성, 기능성을 충족하고 쾌적한 관람환경이 될 수 있도록 계획 수립.

8) 기존 각종 설비(전기, 소방, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 계획하되, 사전에 발주처와 협의하여야 하며, 전시종료시 원상복구.

9) 전기공사업을 등록한 업체에서 시공해야 하며 부주의로 인한 화재발생시 모든 책임은 시공 업체에 있음.

2. 세부지침

가. 전시공간

1) 공간구성

○ 공간구성은 전시기획(안)을 참고한다.

○ 전시장의 관람동선은 원활하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며, 전시실 내부 관람객 휴게공간을 고려하여 계획되어야 한다.(전기배선 고려)

○ 전시성격에 맞추어 전시그래픽, 전시보조물을 계획하며, 필요시 상징조형물(모형) 등을 통해 전시실 내 분위기 조성을 고려한다.

2) 색채구성

○ 친환경 자재를 사용하며, 전반적인 색채구성이 상호 연계성과 차별성이 강조되면서도 전체적 조화를 이루어야 한다.

3) 전시조명설비

○ 전시물의 전체조명 및 집중 조명에 적합한 조명배치와 조명기구를 계획한다.

○ 신규조명 설치 시에는 유물의 종류와 전시기법 등을 고려하여 적정한 시스템(LED조명)을 선택하여야 하며, 연색성과 색온도 등을 계획 시 반영한다.

(박물관 소유의 매입 등 활용시 취급 중 파손 또는 결함이 발생하지 않도록 주의하며 전시종료 후 수량과 상태 확인후 반납한다. 결함이 생길 경우 감독관과 협의하여 수리 또는 변상해야 한다.)

나. 전시시설물

1) 일반사항

○ 전시실 천장, 벽, 바닥, 파티션, 진열장, 설치대 등의 마감 재료 및 디자인은 주위시설 및 조명과의 조화, 유물의 안정적 거치 및 보존, 유지 관리의 용이성, 변질 방지 등이 최대한 보장되도록 설계되어야 하며, 수시로 채색과 보수 등 현상 변동을 필요로 하는 설계는 지양한다.

○ 유물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 친환경자재를 사용한다.

○ 전시실 파티션 진열장 등에 설치되는 유리는 파손시 비산되지 않도록 안전필름을 부착하거나 접합유리를 사용한다.

○ 전시물의 제작·설치 차후 부품교체, 보수, 철거 등 유지관리에 용이하도록 고려하여 제안한다.

2) 진열장

○ 신규 진열장 계획 시 전시효과와 전시물 보호 기능을 충족시킬 수 있는 진열장을 설계하되 시공성, 경제성을 고려하고 전시공간과 조화되도록 제작한다.

○ 특히 메인 전시품인 풍속화와 민속유물 전시를 위한 진열장은 준상설 정도의 내구성과 밀폐력을 가진 진열장이 제작되어야 하므로 감독관과 사전 상의한다.

3) 전시보조자료(전시대, 받침대, 패널 등) 설치

○ 전시연출에 필요한 받침대, 전시대, 기타 전시사인물 등은 유물의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출한다.

○ 유물 받침대와 패널, 설명카드, 배너 등은 유물의 안정적이고 무해한 거치·보존 및 시각 효과와 유지관리의 용이성, 내구성 등을 보장하도록 재질 및 형태, 색채 등이 설계되어야 한다.

4) 모형전시물

○ 전시의 이해를 돕기 위해 모형연출을 사실감 있게 설치 제안한다.

○ 전시물의 실사를 재현·축소 및 확대한 특수 제작물은 내용의 표시, 배치 방법, 설치장소, 크기, 재료, 이미지스케치, 연출방법 등을 제안서에 명시한다.

5) 연출영상물 설치

○ 연출영상물은 전시를 보완하는 내용으로, 최신 기법을 통한 안정적이고 효과적인 설비와 구성이 되도록 계획되어야 한다.

○ 국립민속박물관에서 제공하는 연출 영상물(세부 내용 붙임)을 전시 시나리오에 따라 연출 제안한다.

6) 기    타

○ 실시설계도서 작성 및 내역산출 후 발주처와 이 내용에 대해 협의 후 제작설치 작업이 진행되어야 하므로 제안서의 사업추진계획과 예정공정표 작성시 이 부분을 반영하도록 한다.

다. 제안 유의사항

1) 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

2) 제안자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공도중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계상치 않는다.

3) 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

4) 추후에 계약으로 확정된 공사금액에 대한 내역 작성 시, 인건비는 시중노임단가를, 자재 및 재료비는 조달청 발행 가격정보 최근호에 의하되 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용한다. 그 외의 미수록 단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용한다.(공인된 원가계산기관의 원가계산도 가능함)

5) 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고, 구성과 관련한 기초 자료는 응모자가 조사 및 검토하여야 한다.

나. 제안 참고자료

1) 전시기획(안)

2) 전시자료목록

3) 기획전시실 I 도면 및 전시실 배치도

4) 영상물 제공 내역 및 영상장비 목록

5) 과업지시서

3. 제안서 작성요령

가. 제안서의 작성지침

1) 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 한다.

2) 제출된 제안서의 내용은 조달청에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주한다.

3) 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

나. 제안서 작성요령

1) 응모서류는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성 권장

2) 설계도, 설계설명서, 관리운영계획서, 예정공정표를 함께 수록.

3) 제안가격에 대한 세부 산출내역서는 우선협상대상자만 기술협상 시 수요기관에 제출.

4) 설계도 등은 가로방향 작성 권장

다. 제안서 세부내용

구 분	내 용	매 수	비고
설 계 도	• 배치도, 실내조감도, 평면도, 입면도, 천정도, 유물 디스플레이 방안, 스케치(투시도) 및 상세도 등 • 실내 마감표 • 조명 계획안(전시실 및 진열장 내부 조명연출) • 설치 및 각종 전시 시설물 제작 사양 외 시방서 (특기시방서) 작성	총 10매 이내 (지정크기-A3)	흑백․ 칼라
설계설명서	• 설계지침에 따라 설계의도(컨셉)와 종합연출계획 (동선,영상, 음향, 인테리어 구성 등) 및 시공방법 (기법, 자재포함)을 기술
예정공정표	• 공정별로 기술
관리운영 계획서	• 전시장 일반관리운영 및 보수·보완 방안 제시

4. 유의사항

가. 제안서 제출사항은 공고문 참조(나라장터)

나. 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

다. 응모자는 제출된 제안서류에 대한 사실여부 등의 책임을 진다.

라. 제안서의 내용을 객관적으로 입증 또는 설명하기 위해 꼭 필요한 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

마. 제안서의 모든 내용은 지적 재산권 관련 사항을 주의해서 작성하여야 하며, 지적재산권 관련 문제 발생 시에는 응모자가 책임을 진다.

바. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 불명확한 표현은 사용할 수 없다.

사. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응해야 한다.

아. 본 사업과 관련 이의 및 이견이 있을 경우 응모자는 발주처의 해석에 따라야 한다.

자. 본 사업은 발주처의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우에 제안자는 발주처의 지시에 따라야 한다.

차. 제안결과에 따른 산출물의 소유권은 국립민속박물관에 있다.

Ⅲ. 제안서 평가 및 협상

1. 제안서의 평가

가. 평가위원회 구성

1) 제안서의 공정한 기술능력평가를 위해 박물관 내·외부의 전문가로 평가위원회를 구성한다.

2) 평가위원회 위원은 국립민속박물관에서 5인 이상의 관련분야 전문가로 선정한다.

3) 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하여 종합평가순위를 결정한다.

4) 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 사전 공개하지 아니한다.

나. 평가방법

1) 소정의 기한 내에 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 평가한다.

2) 평가위원은 평가 시 본 지침의 평가기준을 적용한다.

3) 평가총점은 100점을 만점으로 하며, 업체에 대한 심사위원별 총계점수를 산술 평균한다.

4) 산술평균의 값은 소수점 5자리 이하에서 사사오입한다.

5) 동점자의 처리는 기술능력평가 점수가 높은 업체를 우선으로 하며, 기술능력평가도 동일한 경우, 제안서 평가의 항목 중 배점이 큰 항목에서 점수가 높은 업체를 선순위자로 한다.

다. 평가결과 발표

1) 평가위원회는 심사내용을 기록한 보고서를 작성하여 평가위원 모두가 서명하고, 발주처에서는 그 결과를 조달청에 제출하여야 한다.

2) 조달청은 제안서 평가점수와 업체평가 점수 및 입찰가격을 종합평가하여 협상적격자 선정 후 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 개찰현황을 공고한다.

라. 기    타

1) 제안서 심사결과 및 세부내용에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 응모자는 평가위원 구성, 평가기준, 평가방법, 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

2) 당선작품 발표 후 5일 내에 반출치 아니한 제안도서는 주최자가 임의 파기한다.

2. 평가항목 및 평가기준

가. 제안서의 평가

○ 제안서의 평가는 총점 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 80점(제안서평가 70점, 사업수행능력평가 10점), 입찰가격 20점으로 배점하여 평가하고, 종합평가 순위에 따라 최우수작으로 선정된 업체를 우선협상대상자로 한다.

○ 평가위원별 총계점수 중 최고, 최저 점수는 버리고 나머지 위원의 점수를 산술 평균하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

나. 기술능력평가(안)

○ 기술능력평가 80점 (제안서 평가 70점+사업수행능력평가 10점)

【기술 제안서 평가 : 70점】

구 분		평 가 항 목		배점
제안서 평가	전시연출 및 공간구성 계획	전시물 디자인의 독창성 (각종 그래픽물, 받침대, 파티션 등)	10	30
		공간구성의 효율성 (전시주제 흐름과 진열장 배치의 상응도)	10
		박물관의 특성을 고려한 재료 사용계획 (친환경자재 사용여부)	10
	조명, 색채, 시스템 연출계획	감성적 조명연출 계획 (조명기구의 적정성 및 설치방법)	10	30
		색채 구성의 적정성(공간 및 전시물)	10
		기타 각종 전시연출 시스템의 적정성 (영상물, 보조이미지 등)	10
	관리 및 운영계획	사업수행 공정 및 수행방법의 타당성	5	10
		사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성	5
합 계				70

【사업수행능력평가 : 10점】

1) 전문인력 보유현황(3점)

평가항목	평가요소	배점	평가방법
참여기술자	등급 및 인원	3	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
			0.5	0.4	0.3	0.2
			○ 점수 = 인원 × 기술자별 점수 ※ 최고 배점 3점을 초과할 수 없음

※ 기술자에 대한 등급은 과학기술부 공고 “엔지니어링산업 진흥법 시행령” <별표 2>의 엔지니어링 기술자(제 4조관련) 등급 및 자격 기준에 의함

※ 공고일 기준 2개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당[재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서, 국민연금관리공단 확인서 첨부]

2) 수행실적 및 경영상태(7점)

평가항목	평가요소	배점	평가방법					비고
			기 준				평점
	합계	7	등 급	등급별 백분위
수행실적	유사용역 및 시공실적 (입찰공고 기준 3년간 사업 실적)	3	A	100% 이상			3.0	○실적평가 -당해예산(210백만원) 기준 ○유사공사(전시) -박물관, 미술관, 과학관, 기념관 등(건축법시행령 별표1 제5항의 마목)
			B	100%미만~70% 이상			2.7
			C	70%미만~40% 이상			2.5
			D	40%미만~20% 이상			2.3
			E	20% 미만			2.1
경영상태	신용평가 등급에 의한 경영상태 평가	4	회사채		기업어음	기업신용
			AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0		A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	4.0
			BBB-, BB+, BB0, BB-		A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	3.6
			B+, B0, B-		B-	B+, B0, B-	3.2
			CCC+이하 (미제출자 포함)		C 이하 (미제출자 포함)	CCC+이하 (미제출자 포함)	2.8

※ 고시금액 미만의 사업이나 단기간의 진행이며 유물을 다루는 박물관의 특성상 원할한 사업수행을 위해 유사용역 및 시공실적에 대한 수행실적을 평가한다.

※ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의 3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어믐, 기업신용평가 등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

※ 공동도급 수행실적은 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가한다. (평가결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다)

다. 입찰가격평가

【입찰가격: 20점】

구 분	주요 평가방법	배점	비 고
입찰가격	협상에 의한 계약체결기준의 평점산식 적용	20	조달청 평 가

3. 협상과정

가. 협상적격자 및 협상순위 결정

1) 기술능력평가점수가 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

2) 기술능력평가+입찰가격평가점수 결과 고득점 순으로 협상대상자 선정 및 순차적 협상 실시

나. 협상내용과 범위

1) 협상대상자가 제안한 과업내용, 추진일정, 제안(입찰)가격 등 제안서의 내용은 일부 조정을 거쳐 발전시켜 나아갈 계획이므로 최종안과 일치하지 않을 수도 있음.

다. 협상절차

1) 협상대상자가 협상내용에 대하여 합의할 경우, 차 순위 협상대상자와 협상 생략함.

2) 협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위 협상대상자와 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬될 경우 순차적으로 차 순위 협상대상자와 협상 실시

4. 저작권 및 사용권

가. 당선작

1) 당선작의 저작권은 당선자에게 귀속된다. 단, 발주처에서 제공하거나 사업 추진중 새롭게 생성된 최종 결과물의 저작권, 지적재산권, 기타 법적소유권 및 생성 자료에 대한 권리는 국립민속박물관에 귀속된다.

※ 박물관이 제공한 콘텐츠와 아이디어를 바탕으로 제작된 창작물은 고유성을 가진 박물관 운영 특성상 국립민속박물관에 귀속됨.

2) 당선작에 대하여 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우, 당선자가 모든 법적 책임을 진다.

4) 발주처는 당선작의 수정‧보완 및 변경에 대한 일체의 권한을 가진다.

5. 응모자의 실격

가. 응모업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

나. 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

다. 접수된 작품을 보완·변경 등 수정할 경우

라. 제출된 서류 등에 중대한 허위사실이 발견되었을 경우

마. 그 밖에 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

※ 위 항목 중 한 항목에라도 해당할 경우, 당해 응모자는 실격 처리될 수 있다.

6. 무   효

○ 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상자체를 무효화할 수 있음.

7. 기   타

가. 상기 기술한 내용 외에 평가관련 사항은 공개하지 아니한다.

나. 주최자는 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 응모작 제출자는 심사위원 구성, 심사기준, 심사결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없다.

다. 실적증명은 첨부양식을 원칙으로 하되, 기 발행 받은 것은 1년 이내 시 유효하다.(입찰공고일 기준)

라. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 한다.

마. 협상 방법 등 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 및 협상에 의한 계약 체결기준(계약예규 )을 준용한다.

바. 전시계획의 설계내역 중 과잉설계, 부실설계, 중복설계 등의 부분에 대해서는 발주기관의 요구에 따라야 한다.

[서식1]

[역병연대기(가제)] 특별전 전시연출용역을 위한 제안서 응모 신청서
접 수 번 호		2021 -
접 수 일 자		2021년 월 일
제 출 자 (대 표 사)	업 체 명
	대 표 자
	주 소
	전 화	TEL : FAX :
국립민속박물관에서 시행하는 「역병연대기 전시연출용역」 제안에 필요한 서류를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 1. 공동제안협정서(서식2) 1부. 2. 대표자 선임계(서식3) 1부. 3. 사업자등록증 사본 각 1부. 4. 실내건축공사업면허증, 산업디자인전문회사신고필증 사본 각 1부. 5. 엔지니어링 활동주체 신고증(수첩) 및 기술사 자격증 사본 각 1부. 6. 실적증명원(원본) 1부. 7. 제안사의 일반현황(서식4) 1부 8. 실적증명서(서식5) 1부 9. 사업수행실적 집계표(서식6) 1부 10. 기술인력 보유현황(서식7) 1부. 11. 신용평가 등급 확인서(서식8) 1부 12. 행정처분내용(서식9) 1부 13. 법인등기부 등본(법인인 경우) 1부 14. 사용인감계(서식10) 1부 15. 위임장(서식11) 또는 재직증명서 1부(대리인이 등록할 경우) 16. 서약서(서식12) 1부 국립민속박물관장 귀하

------------------------------------------<절취선>-----------------------------------------------

[역병연대기(가제)] 특별전

전시연출용역을 위한 제안서 응모 신청서

접수번호	2021-	접수일자	2021년 월 일
업 체 명
주 소
대 표 자
접 수 자	성명 (인)

[서식2]

공동제안협정서(예시)

제1조 (목적) 이 협정서는 국립민속박물관에서 시행하는 「역병연대기(가제) 특별전 전시연출용역을 위한 제안」을 (   )와 (   )가 공동으로 제안하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동제안 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

제3조 (공동제안의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동제안업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                  (소재지 :          대표자 :       )

2. 업체명 :                  (소재지 :          대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 국립민속박물관 및 제3자에 대하여 공동제안업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 제안의 이행으로 종결된다. 다만, 협상작으로 결정되면 국립민속박물관 전시시공완료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동제안업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동제안업체(자)의 구성원은 전시연출용역 설치 업무에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제9조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 자격 요건에 미달하게 될 경우에는 제안서를 제출할 수 없다.

② 제안 후 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하고 국립민속박물관의 승인을 받아  탈퇴업체(자)를 교체할 수 있다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동제안협정서를 체결하고 그 증거로 협정서( )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2021.     .     .

○ 대표업체                      업체명 :                 (전화번호)

소재지 :

대표자 :                 (인)

○ 공동제안업체(자)               업체명 :                 (전화번호)

소재지 :

대표자 :                 (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식3]

대 표 자 선 임 계

사업명 : 「역병연대기(가제)」 특별전 전시연출용역을 위한 제안」

본인은 국립민속박물관에서 주관하는 특별전 전시연출용역을 위한 제안에 관한 모든 권한을 공동제안대표자에게 위임합니다.

2021.     .

○ 공동제안 대표자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

○ 공동제안자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식4]

제안사의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

[서식5]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립민속박물관
	증명서용도		「역병연대기(가제) 특별전」 실 적 증 명 용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2021년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식6]

사업수행 실적 집계표

구 분	공 사 명		공 사 기 간	준공금액	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
①최대 실적 (1건)
	소 계
②기타 실적
	소 계
합 계 (①+②)

주)  최근 3년간(공고일 기준) 홍보관, 전시관, 과학관, 체험관 등의 전시물을 제작․설치한 실적

[서식7]

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축 기 술 자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○○
기타

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링사업 대가의 기준에   따르며 <별첨5>참조, 공고일 기준 2개월 이상 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 명기

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 자격증, 최종학력증명서, 경력증명서 및 4대 보험 확인서 첨부

[서식8]

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보 합니다.

교부일  2021.   .   .

신용평가기관 :                           인

[서식9]

행정처분내용

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

[서식10]

사 용 인 감 계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 국립민속박물관에서 주관하는 「역병연대기(가제) 특별전 전시연출용역」 입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민·형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임 : 인간(법인)증명서 1부. 끝.

2021년    월    일

주  소 :

업체명 :

대표자 :

국립민속박물관장 귀하

[서식11]

위      임      장

대표자	성명		주민등록번호
	주소
	업체명		연락처
대리인	성명		주민등록번호
	주소
	업체명		연락처	☎ : HP :
국립민속박물관에서 시행하는 「역병연대기(가제) 특별전 전시연출용역」에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2021. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 국립민속박물관장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐.

[서식12]

서     약     서

국립민속박물관에서 추진 중인 「역병연대기(가제) 특별전 전시연출용역」 입찰에 참여한 당사는 국립민속박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2021년   월    일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식13]

서   면   질   의   서

발송일시	년 월 일
제 안 서 접수번호		연락처	전화 : fax :
업 체 명	(대표: )
제안서 쪽수
질의내용	※ 제안지침서를 다시 한 번 숙지하시어 질문하여 주시기 바랍니다. ※ 명료하게 작성요망바랍니다.

[서식14]

기술능력 제안서표지양식(참고용)

2021년    월     일

[역병연대기] 특별전 전시연출용역

주) 1. 표지크기 : A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 굴림체, 흑색사용

4. 글자크기 : 제목 30, 72호, 날짜. 22호, 식별번호 22호

<제목 : 역병연대기 특별전 전시연출용역 제안서>

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

6. 도판 및 작품모형, 사업제안서의 여백, 앞뒤, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는  공모업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 한다.