문화체육관광부 고시 제2011 - 51호

국 토 해 양 부 고시 제2011 -889호

태안 관광레저형 기업도시 개발계획

및 실시계획 변경 고시

기업도시개발특별법 제11조, 제12조 및 동법 시행령 16조, 제17조 규정에 의하여 태안 관광레저형 기업도시의 개발계획 및 실시계획을 변경하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2011년  12월   일

문화체육관광부장관

국토해양부장관

Ⅰ. 개발계획 변경

1. 개발계획의 명칭(변경없음)

2. 시행자의 명칭 및 주소와 대표자의 성명

◦명  칭(변경없음)

◦주  소(변경없음)

◦대표자 : (기정) 김 선 규   (변경) 나 경 준

3. 개발계획의 개요

1) 총사업비(변경없음)

.

2) 계획인구(변경없음)

3) 주요시설(변경없음)

4) 주요기반시설 설치계획(변경없음)

가. 구역 밖(변경없음)

나. 구역 내(변경없음)

5) 연차별 자금 투자계획(변경)

◦기정

(단위:억원, 불변가격기준)

구 분		합계	2007	2008	2009	2010	2011
토지취득비용	토지매입비	2,597	2,597	-	-	-	-
도시조성사업	조 사 비	226	226	-	-	-	-
	설 계 비	343	47	118	113	65	-
	공 사 비	7,408	153	863	2,550	2,433	1,409
	일반관리비	259	5	30	89	85	50
	기 타 경 비	246	246	-	-	-	-
농지관련비용	토지매입비	346	346	-	-	-	-
	공 사 비	34	3	14	13	4	-
	설 계 비	2	2	-	-	-	-
	일반관리비	1	1	-	-	-	-
도시조성사업 사업비 합계		11,462	3,626	1,025	2,765	2,587	1,459

◦변경

(단위:억원, 불변가격기준)

구 분		합계	2007~10	2011	2012	2013	2014
토지취득비용	토지매입비	2,597	2,597	-	-	-	-
도시조성사업	조 사 비	226	226	-	-	-	-
	설 계 비	343	55	96	96	96	-
	공 사 비	7,408	849	333	2,075	2,075	2,076
	일반관리비	259	30	13	72	72	72
	기 타 경 비	246	246	-	-	-	-
농지관련비용	토지매입비	346	346	-	-	-	-
	공 사 비	34	-	-	-	17	17
	설 계 비	2	2	-	-	-	-
	일반관리비	1	-	-	-	1	-
도시조성사업 사업비 합계		11,462	4,351	442	2,243	2,261	2,165

4. 개발기간(변경)

- 기정 : 2007년~2011년(시설공사 2011년~2020년)

- 변경 : 2007년~2014년(시설공사 2011년~2020년)

5. 사업체의 설치 및 이전계획(변경)

□ 부지조성공사 기한 연장에 따른 변경

○ 도시조성 자체사업 계획(변경)

구 분		조성시기
		기정	변경
청소년문화 체육시설		2007년 착공 2013년 완공	2012년 착공 2016년 완공
테마파크		2009년 착공 2016년 완공	2012년 착공 2019년 완공
주거용지 (6~16BL)		2007년 착공 2010년 부지조성 완료 2016년 도시조성 완료	2012년 착공 2019년 도시조성 완료
골프장	회원제 골프장	∙4번골프장 2009년 착공 2011년 완공 ∙6번골프장 2010년 착공 2012년 완공	∙4번골프장 2012년 착공 2014년 완공 ∙6번골프장 2013년 착공 2015년 완공
	퍼블릭 골프장	∙5번골프장 2010년 착공 2012년 완공	∙5번골프장 2013년 착공 2015년 완공
		∙1번골프장 - 조성공사 2007년 착공 2009년 완공 -시설공사 2009년 착공 2010년 완공 ∙2번골프장 - 조성공사 2007년 착공 2010년 완공 - 시설공사 2009년 착공 2011년 완공	∙1번골프장 - 조성공사 2009년 착공 -시설공사 2013년 완공 ∙2번골프장 - 조성공사 2009년 착공 - 시설공사 2013년 완공

○ 도시조성 외부사업 계획(변경)

구 분	조 성 시 기
	기정	변경
아카데미 타운	- 2010년 착공 - 2011년 부지조성 완료 - 2013년부터 부지 분양 - 2016년 도시조성 완료	- 2013년 착공 - 2014년 부지조성 완료 - 2014년부터 부지 분양 - 2019년 도시조성 완료
첨단복합 단지	- 2007년 착공 - 2010년 부지조성 완료 - 2010년부터 분양계획 - 2020년 도시조성 완료	- 2012년 착공 - 2013년 부지조성 완료 - 2013년부터 분양계획 - 2020년 도시조성 완료
테마파크	- 2009년 착공 - 2011년 부지조성 완료 - 2011년부터 분양계획 - 2016년 도시조성 완료	- 2012년 착공 - 2014년 부지조성 완료 - 2014년부터 분양계획 - 2019년 도시조성 완료
국제비지니스 단지	- 2009년 착공 - 2011년 부지조성 완료 - 2011년부터 분양계획 - 2020년 도시조성 완료	- 2012년 착공 - 2014년 부지조성 완료 - 2014년부터 분양계획 - 2020년 도시조성 완료
상업/업무 시설	- 2007년 착공 - 2010년 부지조성 완료 - 2010년부터 분양계획 - 2020년 도시조성 완료	- 2012년 착공 - 2013년 부지조성 완료 - 2013년부터 분양계획 - 2020년 도시조성 완료
주거용지 (1~5BL, 17~24BL)	- 2009년 착공 - 2011년 부지조성 완료 - 2009년부터 분양계획 - 2020년 도시조성 완료	- 2012년 착공 - 2014년 부지조성 완료 - 2013년부터 분양계획 - 2020년 도시조성 완료
골프장 3	- 2009년 착공 - 2010년 부지조성 완료 - 2010년부터 분양계획 - 2011년 도시조성 완료	- 2012년 착공 - 2013년 부지조성 완료 - 2013년부터 분양계획 - 2014년 도시조성 완료

6. 토지이용에 관한 계획(변경없음)

1) 토지이용 총괄표(변경없음)

2) 도입시설 계획(변경없음)

3) 토지이용계획(변경없음)

7. 개발하고자하는 토지의 위치와 면적(변경없음)

1) 위치(변경없음)

2) 면적(변경없음)

8. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명․주소를 기재한 서류(변경없음)

9. 태안군 도시관리계획결정(변경)조서 및 사유서(변경없음)

Ⅱ. 실시계획 변경

1. 사업의 명칭(변경없음)

2. 시행자의 명칭 및 주소와 대표자 성명

◦명  칭(변경없음)

◦주  소(변경없음)

◦대표자 : (기정) 김 선 규   (변경) 나 경 준

3. 사업의 목적과 개요(변경없음)

1) 사업의 목적(변경없음)

2) 사업의 개요(변경없음)

◦ 총사업비(변경없음)

◦ 인구 및 주택 공급계획(변경없음)

ㅇ 주요도입시설(변경없음)

◦ 토지이용계획(변경없음)

4. 사업시행기간(변경)

- 기정 : 2007년~2011년(시설공사 2011년~2020년)

- 변경 : 2007년~2014년(시설공사 2011년~2020년)

5. 사업시행지의 위치 및 면적(변경없음)

1) 위치(변경없음)

2) 면적(변경없음)

6.「국토의계획및이용에관한법률」의 규정에 의한 제1종 지구단위계획(변경)에 관한 사항(변경없음)

7. 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항(변경없음)

※ 서류 및 도면의 열람장소 및 열람기간

ㅇ 열람장소 : 충청남도 태안군 기업도시개발지원사업소

(041-670-2272)

ㅇ 열람기간 : 사업시행기간 내