	보도자료
	2010년 7월 14일 배포		2010년 7월 14일
	총 1쪽, 첨부 : 사진, ...		담당 : 디자인공간문화과 이용욱
	전화 : 02)3704-9454/ 팩스 : 3704-9459/ 이메일 : yulee110@korea.kr
舊 서울驛舍는 복합문화공간으로 변신중
- 2010. 7. 14(수) / 구서울역 복원공사현장 공개-

문화체육관광부(장관 유인촌)는 ‘10. 7. 14(수) 구서울역사 복원공사 현장에서 진행상황을 공개했다. 우리나라 대표 복합문화공간으로의 재탄생을 목표로 지난해 7월 착공에 들어가 내년 3월 완공 예정인 구서울역사는 현재 53%의 공정률을 보이며 공사에 한창이다.

구서울역사 복원공사의 기본방향은 건축사적으로는 1925년 준공 시점을 기준으로 복원하되 84년의 역사적 흔적들을 그대로 살리자는 것이다. 따라서 건축물 내외부를 크게 변형하지 않고 기본적으로 있는 그대로를 문화공간으로 활용하게 된다.

1925년 건립 당시 자료를 근거로 복원의 역사적 가치에 따라 내부공간을 상, 중, 하 3등급으로 나누어 실별로 복원하고, 건물의 안전과 구조상의 문제점에 대한 보수보강이 이루어진다. 관계전문가가 참여하는 공정회의를 매주 개최하고 있으며,  중요 사안에 대하여는 문화재자문회의를 거쳐 공정에 반영하고 있다.

구서울역사는 지난 2007년 8월 문화체육관광부가 관리를 맡은 이후, 사진ㆍ미술･디자인･건축 전시회, 음악회, 컨퍼런스, 패션쇼 등 그야말로 다양한 문화행사를 통해 복합문화공간으로서의 탁월한 가능성과 잠재력을 갖고 있음을 입증한 바 있다.

구서울역사가 개관하면 한국 문화예술의 발신기지 역할은 물론, 세계적인 관광명소가 될 것으로 기대된다.

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면

문화체육관광부 디자인공간문화과 이용욱(☎ 02-3704-9454)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임#

구서울역사 복합문화공간화 추진현황

□ 사업개요

추진배경 : KTX 신역사 개통 이후 기차역의 기능이 소멸된 구서울역사(사적 제284호)를 우리나라 대표 복합문화공간으로 조성

사업기간 : 2007년 9월 ～ 2011년 3월

총사업비 : 211억원(공사비 187, 설계비 9 감리비 12, 부대비용 등 3)

구 서울역사 원형복원 및 문화공간으로 리모델링

- 건축연면적 : 9,202㎡(지상 2층, 지하 1층), 광장 조경

주요시설 : 상설전시관, 다목적전시실, 공연장, 사무실 등

□ 추진실적

철도청의 공사전환으로 국유문화재(사적 제284호) 소유권 이전(‘07. 8월)

문화재청에서 문화관광부로 관리위임(‘07. 8. 30)

복합문화공간화 추진을 위한 9개 분야 기초연구(‘07. 10～12월)

「구 서울역사 복합문화공간화 조성 사업」기본계획 수립(‘07. 11. 22)

구 서울역사 실시설계를 위한 건축설계경기(‘08. 3～6월)

구 서울역사 리모델링 설계(‘08. 8～’09. 4월)

시공사 선정 입찰 및 시공사(삼부토건 등) 선정(‘09. 5～6월)

공사 계약체결 및 리모델링 공사 착수(‘09. 7월~)

‘10. 7월 현재 공정율 53%

□ 향후 추진계획

리모델링공사 진행 ( ~ ‘11. 3월)

개관(‘11. 4월)

□ 공간 활용계획

건축물 내․외부를 복원, 있는 그대로를 활용

소규모 공연장(317㎡, RTO공간)과 상설전시관(519㎡, 1․2등대합실과 귀빈실 등)을 제외한 모든 공간은 특별하게 용도를 정하지 않고 상황에 맞게 전시, 공연, 세미나 등 다목적으로 활용

- 중앙홀 : 다목적 열린 공간

- 문화역사관 : 1층 일부 공간(1·2등 대합실, 귀빈실 영역)을 활용, 서울역의 역사를 통해 우리 근현대사를 조망할 수 있는 상설 전시관으로 운용하되, 단순히 전시만하는 공간이 아니라 IT를 활용하여 방문객과 상호작용하는 체험의 장으로 조성

- 상설공연장 : 건물 오른편 미군장병안내소(RTO)로 쓰이던 공간

- 다목적 전시․공연 공간 : 1층 3등 대합실과 2층은 전시, 공연, 세미나, 회의 등을 위한 다목적 공간

- 노천카페 : 국군장병안내소(구. 승객통로)로 사용되던 공간

- 광장 : 문화․예술 광장으로서의 기능을 회복하는 것에 중점을 두고 공간 활용의 자율성을 부여, 구서울역사 내부 프로그램의 기본방향과 어긋나지 않는 공연과 전시가 가능하도록 할 계획임

【조감도】