광주지역

기자간담회

아시아문화중심도시 조성사업

주요현안업무 설명자료

2011. 12. 8(목)

아시아문화중심도시추진단

목   차

1. 문화전당 전체 공정현황 및 계획	1

2. 5․18 보존건물 설계 및 활용 방향	3

3. 문화전당 콘텐츠 및 프로그램 추진계획	4

4. 아시아 문화주간 행사 개최	11

5. 아시아문화예술 창작공간 조성	11

6. 아시아 예술커뮤니티 구축 강화	12

7. 아시아문화개발원 설립․운영 계획	14

8. 문화전당 조직 구성계획	14

9. 투자조합 결성․운영 계획	15

10. 조성사업을 통한 경제효과	16

1		문화전당 전체 공정현황 및 계획

ㅇ '11년까지 전체 공정률 32% 달성

ㅇ ‘12년까지 전체 공정률 58% 달성

* 정부예산안 576억원(48%), 424억원 추가확보 필요

ㅇ ‘14년 문화전당 전체 공사 완공 및 개관

□ 개 요

ㅇ 사업기간 : 2004 ～ 2014년 (당초 '12년 준공)

ㅇ 건립규모 : 부지 128,621㎡(38,908평), 연면적 173,540㎡(52,495평)

* 당초 178,199㎡(53,905평)에서 어린이문화원 면적 축소 조정

ㅇ 주요시설 : 5개원

- 신축 : 창조원(창조공간 + 미술관), 정보원(신개념 박물관 + 도서관),  예술극장, 어린이문화원

- 리모델링 : 민주평화교류원(5․18 관련 건물)

ㅇ 총사업비 : 7,040억원

- 지금까지 투입액 : 4,170억원

□ 공정계획

ㅇ '11년까지(공정률 32%)

- 어린이문화원을 제외한 전당 골격 완성 및 외부 방수 완료

- 어린이문화원 변경 및 보존건물 리모델링 설계 완료(11.30)

ㅇ ‘12년까지(공정률 58%)

- 어린이문화원 공사착수(‘12.2) 및 보존건물 리모델링 착수(하반기)

- 전당 외벽 및 창호 등 설치로 건물 외부형태 완성

․어린이문화원은 지하 2층까지 골조공사 완료

ㅇ ‘14년(공정률 100%)

- 상반기 완공, 시운전을 거쳐 하반기 개관

참고

문화전당 공정계획 및 리모델링 주요내용

□ 문화전당 건립 로드맵

구분	2011	2012		2013		2014
공정률	32%	58%		90%		100%
ㅇ창조원 ㅇ정보원 ㅇ예술극장							통합 시운전 및 개관
	골조, 창호공사(‘12.6 완료)
		도장,인테리어,조경(‘13.12 완료)
	설비공사(‘13.12 완료)					시운전
ㅇ어린이 문화원
	설계보완	골조공사(‘13. 4 완료)			마감공사(‘14. 9)
ㅇ교류원 (보존건물)
	설계완료	리모델링공사(‘12.하반기 ～ ‘14. 6)

□ 보존건물 용도 및 리모델링 내용

구 분		면적	용도	주요내용
구)전남 도청	본관	1,302㎡	민주인권평화 기념관	내․외부 창호․마감 보완
	회의실	1,597㎡	컨퍼런스 홀	내․외부 창호․마감 보완
	별관	1,599㎡	부분존치	구조보강, 강구조물 설치
경찰청	본관	2,492㎡	교류원 지원공간	사무공간
	민원실	695㎡		사무공간
상무관		625㎡	메모리얼 홀	내․외부 창호․마감 보완
계		8,310㎡ (2,514평)

2		5․18 보존건물 설계 및 활용 방안

ㅇ 보존건물 구조보강 및 리모델링 설계

- 리모델링 : 도청 본관․회의실, 경찰청 본관․민원실, 상무관

- 도청 별관 : 4칸 철거, 5칸 구조 보강

ㅇ 보존건물 활용방안

- 민주인권평화기념관 관련 국내외 전문가 및 광주시민 의견수렴을

통해 운영방안과 콘텐츠·프로그램 개발 방향 도출

□  5.18 보존건물 리모델링 설계

ㅇ 리모델링 설계(11.30일 설계 완료)

- 도청 본관․회의실, 경찰청 본관․민원실, 상무관

․외부 재 도장 및 내․외부 마감공사

- 경찰청 민원실 : 내부 철골구조로 개축

- 도청별관 : 4칸 철거, 5칸 강구조물로 보강하여 형태 유지

ㅇ 향후계획 : 리모델링 공사 착수(‘12. 하반기)

□  5.18 보존건물 활용방안

ㅇ 5․18관련 단체 및 국내외 전문가, 광주시민 의견수렴 10회(‘11.7~12)

- 전문가 포럼(7회), 국제워크숍(1회), 시민토론회(2회)

- 뉴스레터 및 SNS(페이스북, 트위터, 블러그) 운영

- 민주인권평화기념관 운영방향 및 전시․공간 프로그램 등 연구

ㅇ 향후계획 : 민주인권평화기념관 운영계획 수립(‘12년초)

- 민주·인권·평화 관련 문화예술 특성화 콘텐츠 및 프로그램 개발 (‘12~’13)

* 아시아와 연대·공유·소통 가능한 전시공간(도청 본관), 컨퍼런스홀(도청 회의실), 메모리얼홀(상무관) 운영 예정

3		문화전당 콘텐츠 및 프로그램 추진계획

ㅇ 아시아와 함께하는 세계적 문화 트렌드 창출

- 아시아 컨템포러리 기반 공연작품 및 개관축제 준비

* 아시아 공통 테마 길(종이, 비단, 쌀의 길) 콘텐츠화

- 아시아 컨템포러리 기반 ‘글로벌 브랜드 축제’ 개최

ㅇ 아시아문화 교류․협력 네트워크를 통한 작품 발굴

- 아시아무용위원회 활용 작품 발굴 등

ㅇ 문화다양성과 공통관심 테마 중심의 문화자원 아카이브 구축

- 디지털 기반 문화자원 아카이브 구축

- 라이브러리 파크(신개념 도서관)의 아시아문화지도 서비스

구축계획 수립

□ 준비 계획

ㅇ 예술감독 선임

- 공연감독(‘12.2), 복합전시관(창조원)․어린이문화원 전시감독(’12)

ㅇ 예술감독 및 작품선정위원회, 아시아문화개발원 등과 긴밀한 협조를 통해 개관콘텐츠 준비

ㅇ 전당 및 관광 연계 패키지 프로그램 마련

- 공연․전시․어린이 프로그램 패키지 상품 운영

- 시즌제(사전예매 할인), 무대체험 프로그램 등 개발

- 전당 - 광주․전남북 관광지 연계 프로그램 등 수립

□ 주요 공간별 개관 준비계획

ㅇ 예술극장 : 개관축제(개관작 제작 및 초청), 시즌 프로그램 기획

- 개막작 제작 : 세계적인 메가 브랜드 1편(대극장/2,000석), 지역및 레지던시 기반 작품 2편(중극장/520석)

- 기획․초청작 및 국제공모 선정작 등을 토대로 공연 작품 준비

ㅇ 창조원 : 복합전시관「아시아의 길」주제 개관 전시 준비

- 미래형 융·복합 문화콘텐츠 쇼케이스 국제 공모전, 워크숍 진행

ㅇ 아시아문화정보원

- 자원수집 : 5대영역(스토리, 조형․상징, 의례․공연, 의식주, 이주․정착)

- 교류협력 및 네트워크를 통한 문화자원 수집

․직접 수집 : 5대영역 중 직접수집 필요한 분야

․교류협력 : 아시아예술커뮤니티 활용 아카이브 구축(음악, 무용)

․네트워크 : 자원 소장기관, 협약기관, 전문가 소장자원(문자 등)

- 문화자원서비스 시스템 개발(자원서비스기능 시범 구축)

ㅇ 어린이문화원

- 기 개발된 전시기획안(24개) 및 교육프로그램(10개) 분석, 외부 전문가 자문 등을 토대로 개관 콘텐츠 확정

- 어린이를 위한 상설 및 기획전시 준비

- 창작 프로그램 개발 : 예술치유 및 창의력 제고(지체장애아, 지적장애아 등) 및 교사․예술가 협업을 통한 교육프로그램 개발

ㅇ 민주평화교류원

- 민주인권평화 관련 콘텐츠 기획전 준비 및 고객중심의 방문자

서비스센터 구축

- 아시아문화교류지원센터 창작공간 네트워크 구축

- 방문자서비스 센터 콘텐츠 개발 및 시범운영

ㅇ 전당 옥외 공간별 특성에 맞는 콘텐츠 및 프로그램 기획

참고

문화전당 각 원별 12년도 세부 추진계획

□ 예술극장

ㅇ 창․제작 중심의 아시아 컨템포러리 공연장

- 아시아 컨템포러리를 지향하는 세계적 메가 브랜드 개관작 제작(대극장 1편, 중극장 2편 이상)

ㅇ 다양한 국내․외 공동제작 프로젝트 및 커뮤니티 프로그램 개발

* 아시아 공통성을 갖는 실크로드, 쌀, 종이, 암각화 등 주제 적극 검토

□ 그 동안 실적

ㅇ 예술극장 특성화 및 개관․시즌 레파토리 발굴

- 공연기획안 1차 국제공모 및 프로듀서 캠프 개최(’10)

․13개국 71작품 응모, 한국․미국 공동「Nameless forest」등 3편 선정

․국제 프로듀서 캠프를 통해 개관작 협력 프로젝트 10개 발굴

- 공연기획안 2차 국제공모 및 창작 레지던시 개최(‘11)

․21개국 77작품 응모, 인니․태국 공동「무기댄스」등 3편 선정

ㅇ 아시아 공연예술 실태 조사 및 아시아적 소재를 활용한 공연 제작

- 아시아 디렉토리 북(22개국 1,865개) 제작 및 공동제작 사례조사(‘06~07)

- 카자흐스탄 신화 공연 ‘무사 마마이’ 쇼케이스(’11.10.9～10/아르코 소극장)

□ 2012 추진계획

ㅇ 예술극장 개관 브랜드 작품 발굴 프로젝트(‘12. 3~)

ㅇ 공연기획안 3차 국제공모 및 창작 레지던시 개최(‘12. 9)

ㅇ 아시아 신화 공연 ‘무사마마이’ 2차 제작 및 한․카자흐스탄 수교 20주년 기념행사 공연(‘12. 8)

* 예술감독 국제공모 선임(‘12.2) 및 운영조직 구성(’12.3)

□ 창조원

ㅇ 다양한 장르가 융․복합되는 창작환경 조성

ㅇ 새로운 문화콘텐츠 시제품 제작을 위한 통합지원시스템 구축

ㅇ 관람객과 소통하는 복합문화 예술공간 조성

□ 그동안 실적

ㅇ 운영 기반 구축 및 프로그램 개발(‘08~’10)

- 문화콘텐츠 기획창작․제작센터 운영전략 및 프로그램 개발

- 복합전시관 운영전략 및 프로그램 개발, 기반조성자료 구축

ㅇ 특성화 프로그램 운영 및 콘텐츠 시범 제작(‘08~’11)

- 인터랙티브 영상 및 사운드 출력장치 등 콘텐츠 시범제작(17건)

- 창조원․예술극장 연계 첨단영상 활용 융복합콘텐츠 공연 ‘무아(巫亞)’ 개발

- 이야기 시각화 프로그램 개발

ㅇ 개관 프로그램 준비 및 쇼케이스(‘09~’11)

- 전시주제개발안 개발(8건) 및 개관전시 주제 키워드 ‘길’ 도출

- 주제 키워드 ‘길’을 바탕으로 인문․기술, 예술 등 융․복합 전시콘텐츠 쇼케이스(탈 : 脫, Asian Cross Road) 제작 및 개최 등

□ 2012 추진계획

ㅇ「창조원 통합운영 종합계획」수립 및 시범운영

- 기획창작센터, 복합전시관 등 효율적 통합운영 계획 수립

ㅇ 창조원 특성화 프로그램 1차 시범운영(시뮬레이션) 및 제작

- 미래형 융·복합 문화콘텐츠 쇼케이스 국제 공모전 진행 및 전시개최

- 수상작가 및 국내외 최고전문가 참여 국제포럼 및 공동창작워크숍 진행

* 복합전시관 전시감독 국제공모(상반기) 및 개관기본계획 수립(하반기)

□ 아시아문화정보원

ㅇ 아시아문화 다양성 보존 및 창조적 활용

ㅇ 아시아문화를 선도하는 문화전문인력 양성

□ 그동안 실적

ㅇ 5대 영역 아시아문화자원 조사 수집

* 5대 영역 : 스토리, 조형·상징, 의례·공연, 의식주, 이주·정착

- 스토리 : 한-중앙아 신화·설화 번역(한·러·영/22편) 및 공동조사 자원 DB구축(3,300여점)

- 조형·상징 : 암각화(탁본, 3D스캔, 사진/영상, 스토리 등), 아시아 8개국 길상문양(사진), 동고문양(사진/영상, 채록, 악보) 1,000여점

- 의례·공연 : 전통음악자원(16개국, 135곡) 및 해설·음원 수집

ㅇ 문화자원관리시스템 1차 개발

- 문화자원 조사수집 및 관리보존 기능 등

ㅇ 정보원 준비관 운영 및 라이브러리 파크 공간운영계획 수립

- 정보(아시아문화지도 등), 열람·체험, 커뮤니티, 휴게 등

ㅇ 아시아문화아카데미 커리큘럼 개발 및 시범운영(‘09~)

□ 2012 추진계획

ㅇ 교류협력 및 네트워크를 통한 아시아문화자원 조사수집 지속

- 직접수집 : 5대 영역 아시아문화자원 직접 조사수집

* 스토리(2차)ㆍ암각화(2차)ㆍ문양(2차)ㆍ음식문화(1차), 음악, 디아스포라

- 교류협력 : 아시아예술커뮤니티 활용 아카이브 구축(음악, 무용)

- 네트워크 : 자원소장기관, 협약기관, 전문가 소장자원(문자 등)

ㅇ 문화자원서비스시스템 심화개발 : 자원서비스 기능 시범구축 등

ㅇ 아시아문화 전문인력 교육 및 아시아문화아카데미 개교 준비

□ 어린이문화원

ㅇ 감성과 창의성을 키우는 어린이 문화예술교육의 산실

ㅇ 아시아문화 기반의 어린이 문화예술교육 체험명소 조성

ㅇ 다분야가 협업하는 미래형 어린이 콘텐츠 창작기반 구축

□ 그동안 실적

ㅇ「안녕, 아시아!」등 전시기획안(24개)도출(’07～’11)

- 지역초등학교 교실을 활용한 전시기획안 1개 시범제작 및 운영(’10)

- ‘아시아’를 테마로 문화예술 기반의 4개 주제안 및 기획안 도출(’11)

- 전시기획안 연계, 팝업북 제작 및 어린이도서관, 학교 등에 배포(’11)

ㅇ「Reboot Robots」등 창작프로그램개발(10개) 및 시범운영(‘10～’11)

- 영유아에서 중학생, 가족, 소외아동 등 폭넓은 수요층 고려

- 국내·외 창작자, 지역학교, 유관기관 등 협업네트워크 토대 마련

ㅇ「어린이문화원 엑스포」등 축제프로그램 기본계획 연구(‘06～’07)

- 국제공모, 아시아어린이 문화축제 등 개관1년 전부터 본격 가동

□ 2012 추진계획

ㅇ 개관전시 및 교육프로그램 등 개관기본계획 수립

- 기 개발 전시기획안(24개) 및 교육프로그램(10개)을 토대로 개관콘텐츠 확정

ㅇ 어린이 창작프로그램(C.A.M.P) 심화 개발

- 예술치유 및 창의력 제고(지체장애아, 지적장애아 등)

- 교사와 예술가의 협업을 통한 실효성 높은 교육프로그램 개발

* 어린이문화원 예술감독 공모(하반기)

□ 민주평화교류원

ㅇ 민주·인권·평화 정신을 아시아와 공유하기 위한 전시 및 교육

프로그램 운영

ㅇ 아시아 문화교류 네트워크 구축 및 방문자를 위한 통합서비스 제공

□ 그동안 실적

ㅇ 민주인권평화기념관 운영방안 설계 및 지역 의견수렴 (‘11)

- 시민토론회(2회), 전문가포럼(7회), 국제워크숍(1회) 등

ㅇ 아시아문화교류지원센터 특성화 방안 마련(‘11)

- 센터운영방안 설계 및 특성화 프로그램 개발

- 심포지움, 전시회 개최(아시아 11개국 25개 창작공간대표 참가)

ㅇ 방문자서비스센터 운영전략 및 프로그램 개발(‘11)

□ 2012 추진계획

ㅇ 민주인권평화기념관 콘텐츠 개발, 시민참여 프로그램 개발

- 전시콘텐츠 개발관련 조사연구․자원 수집, 콘텐츠 기획한 도출 및 문화예술 특성화 콘텐츠 개발(‘12. 2~ )

- 시민참여 프로그램 개발 및 시범운영(‘12. 2~ )

ㅇ 아시아문화교류지원센터 창작공간 네트워크 구축(‘12. 4~ )

- 아시아 10개국 15개 창작공간 관계자 간 네트워크 구축

*  창작공간 관계자초청, 국제심포지움․쇼케이스 전시 개최 → 교류협력 기반․DB 구축

ㅇ 방문자 서비스센터 콘텐츠 개발 및 시범운영('12. 3~ )

- 전당 이용안내, 문화예술관광콘텐츠, 다국어 콘텐츠 개발․시범운영

4		아시아 문화주간행사 개최

ㅇ ‘글로벌 브랜드 축제’ 개최 등 전당연계 프로그램 운영

ㅇ 아시아 각국과의 교류협력 기반 구축

□ 추진현황(2011년)

ㅇ 광주월드뮤직페스티벌, 아시아청소년문화축전, 아시아창작공간

네트워크, 아시아어린이합창단 공연 등(8.22~8.28)

□ 향후계획(2012년)

ㅇ ‘아시아의 길’ 주제, 개․폐막식 등 6개 행사 20여개 프로그램 운영

* 종이의 길(서울), 비단의 길(광주), 쌀의 길(프놈펜 / 아세안+3 정상회의 계기)

* 한․중앙아문화장관회의(수교20주년 계기), 아시아전통오케스트라 공연

ㅇ 참가 : 세계 40개국 청소년, 예술가, 정부관계자 등 참석

5		아시아문화예술 창작공간 조성

ㅇ 광주광역시 구)서구청사 리모델링 활용

- 부지면적 9,987㎡, 연면적 4,980㎡(건물 4층 : 지하 1, 지상 3)

□ 추진방향

ㅇ 아시아 문예창작 레지던시(스튜디오) 및 전시 공간 조성을 통한 문예창작 활성화와 예술인의 국제 교류 도모

- 아시아 각국 및 우리나라(광주 포함) 예술인 창작공간으로 사용

ㅇ 문화전당 사업과 연계한 전시․공연 등 창작활동 연계 운영

□ 향후계획

ㅇ 리모델링 등 아시아 문예창작공간 조성(‘12.상반기)

ㅇ 아시아 문예창작공간 개원․운영(‘12. 하반기 ~)

6		아시아 예술커뮤니티 구축강화

ㅇ 문화전당 교류협력 기반마련 및 문화자원 아카이브 구축

ㅇ「신아시아 외교구상」가시화를 위한 5대 권역별 예술커뮤니티 구축

□ 그동안 실적

ㅇ 문화콘텐츠 공동 창․제작사업을 통한 3개권역 교류기반 구축

권역	장르	추진실적
동남아	전통음악	ㅇ한-아세안 전통음악위원회 창설(‘08.9) ㅇ한-아세안 전통 오케스트라 창단(‘09)
중앙아	신화설화	ㅇ한-중앙아 스토리텔링 위원회 창설(‘09.10) ㅇ한-중앙아 창작 시나리오 국제공모 개최(‘11) ㅇ한-몽 문화자원 협력회의 개최(‘10.9)
서남아․동남아	무용	ㅇ아시아 무용위원회 창설 및 아시아 무용단 창단 합의(‘10.11.24) → 연석회의(’11.6) ㅇ아시아 무용작품 안무계획안 국제공모 개최(‘11)

* 2개권역은 ‘12부터 추진 : 서아시아(전통문양), 동북아(전통연희)

□ 향후계획

ㅇ 동남아 : 아시아전통오케스트라 공연 및 음악자원 아카이브

- 오케스트라 캄보디아 공연(‘12.11월, ASEAN+3 정상회의 연계)

ㅇ 중앙아 : 아시아 창작 시나리오 국제 공모전 개최(3~7월)

- 아시아 신화·설화 소재 만화, 뮤지컬, 연극, 영화 시나리오 국제공모

* ‘11년 공모 당선작 활용 콘텐츠 제작(민자유치 및 기업과 공동제작 추진)

ㅇ 서남아․동남아 : 아시아 무용단 워크숍 및 무용자원 아카이브

* ‘11년 공모 당선작 우수 무용작품(2편) 문화전당 개관 콘텐츠화 추진

ㅇ 서아시아(전통문양) 및 동북아시아(전통연희) 커뮤니티 기초조사

참고

한․중앙아 창작시나리오 및 아시아무용작품 국제공모 결과

□ 한․중앙아 창작시나리오 국제공모 결과

ㅇ 목적 : 아시아 소재(신화․민담․영웅서사시) 활용 문화전당 콘텐츠 개발

ㅇ 공모기간 : ‘11 5. 30 ～ 9.2

ㅇ 응모결과 : 7개국 총 155편 응모

ㅇ 당선작 선정 : 키르기스스탄「여장의 눈물」(大賞) 등 11편(5개국)

* 시상 : 각 국별 문화부장관상 수여

국가	시나리오	트리트먼트
대한민국	‘청평사애-사마르칸트의 눈물’(뮤지컬)	‘마리아 아베 마리아’ (드라마)
카자흐스탄	‘심청전-2005’(연극)	‘줴스티르낙’(영화)
키르기스스탄	‘알타이로 쫓겨난 키르기스인‘(연극)	‘마나스’(드라마)
타지키스탄	‘구르조드’(연극)	‘구르조드와 그의 아들 아바즈’(드라마)
우즈베키스탄	사랑의 거울	눈이 오지 않는 나라

□ 아시아 무용작품 안무계획안 국제공모 결과

ㅇ 목적 : 아시아무용단(‘14창단, 16개국 참여예정) 레파토리 발굴 및 문화전당 콘텐츠 개발

ㅇ 공모기간 : ‘11 8. 8 ～ 10. 28

ㅇ 응모결과 : 17개국 총 66개 작품 응모

ㅇ 당선작 선정 : 이스라엘「강」(金賞) 등 3편(3개국)

작품명	출품자(팀) 성명	출품자 국적
아쉬타 딕팔라카스 (The Ashta Dikpalakas)	Mayuri Upadhya, Madhuri Upadhya	인도
가면들 뒤 (Behind the Masks)	Martinus Miroto	인도네시아
강(The River)	Idit Herman, Michal Herman	이스라엘

7		아시아문화개발원 설립․운영 계획

ㅇ 목적 : 문화콘텐츠 제작․유통 활성화 및 연구․개발

* 전당 개관(‘14) 이전에는 문화전당 개관준비 지원에 주력

ㅇ 조직 / 인원 : 원장․사무국장, 4개팀 / 20명

□ 추진현황

ㅇ 설립준비단 구성․운영(‘11. 7~)

- 사무실 설치준비(광주 소재), 제 규정 마련 등 개원 준비

ㅇ 개발원장 및 이사회 구성 추진

- 적임자 선임 중 / 이사회 15인 내외(광주시 추천 5인 포함)

□ 향후계획

ㅇ 창립 이사회 개최(12.20 전후) / 제 규정 승인

ㅇ 개발원 개원(12.23 전후) / 개발원 직원채용(현재 채용 공고 중)

8		문화전당 조직 구성계획

ㅇ 조직 유연성․전문성을 고려한 전당 조직․인력운영 최종안 마련

ㅇ 문화전당 직제 협의 및 전당 운영인력 충원

□ 추진현황

ㅇ 전당운영 적정 소요인력 검토

ㅇ「문화전당 효율적 체계 및 운영방안」연구

ㅇ 전당시설 민간위탁, 아웃소싱 및 전당 재원 다각화 등 경제성 제고방안 검토

□ 향후계획

ㅇ 전당 조직체계 구축 및 운영인력 최종안 마련(‘12.상반기)

ㅇ 전당 조직․직제 협의(행안부․기재부, ‘12.하반기)

ㅇ 전당운영 인력 단계별 충원(‘13 ~ ’14)

9		투자조합 결성․운영 계획

ㅇ 창의력과 기술력은 보유하고 있으나 재원이 부족한 문화산업 기업 창업 및 제품 제작․유통 지원을 위한 투자조합 결성․운영

ㅇ 문화산업 활성화 및 조성사업 민간투자 유치확대 도모

□ 투자조합 결성·운영 계획

ㅇ 투자조합 결성규모 : 150억원 (국비 40, 지방비 35, 민자 75억원)

* 투자조합 효율성(분산투자 및 관리비 등) 감안시 최소 150억원 규모가

되어야 일반투자자(창투사, 민자) 유치 및 투자효과 실현 가능

ㅇ 관리·운영 : 전문기관위탁운영

- 조 합 명 : 가칭「아시아문화산업투자조합 1호」

- 운영기간 : 7년으로 하되 회수금 재투자 추진

ㅇ 투자대상 : 문화산업, 관광사업 등 창업지원, 제품의 제작·유통 지원

- 아시아문화중심도시 관련 문화산업 기업 또는 제품

- 광주시 소재 기업의 사업성 있는 문화산업 제품 및 광주시 소재 기업과 공동제작 또는 참여 비율이 30%이상인 제품

□ 향후계획

ㅇ 투자 사업 공고·창투사(모태펀드) 선정(‘12. 3 ~ 4)

ㅇ 투자조합 결성(공공 및 민간 출자금 납입) 및 운영(‘12. 5 ~ 6)

* 투자유치 합동설명회 개최 2회(서울, 광주) : ‘12 상·하반기

10		조성사업을 통한 경제효과

ㅇ 문화중심도시 조성사업에 따른 고용창출 및 생산유발 효과 분석

□ 조성사업 경제효과 [사)경영정보연구원, 2007]

ㅇ 고용창출 : 112,000명

ㅇ 생산유발 : 8조 7천억원

* 주요 고용창출 및 생산유발 분야

․문화콘텐츠 산업분야 : 음악, 공예․디자인, 첨단영상 등

․관광산업 분야 : 광주․전남북 지역축제 및 문화유적지 등

□ 문화전당 방문객 : 250만명(2014년)

☞  2014년 KTX 완공(오송-광주)에 따른 1시간 30분 이내 소요, 2015년 광주하계유니버시아드 대회 개최 및 광주-전남북 관광지 패키지 프로그램 연계시 고용산업 효과는 대폭 신장 전망

참고

조성사업에 따른 고용창출 분야 직종 및 관련학과

분 야	직 종	관련 학과	비 고
음악콘텐츠	ㅇ 가수, 안무가 및 무용수 ㅇ 작사 및 작곡가, 음악 연주자, 음향 전문가 ㅇ 기획사 운영자, 음반제작 유통 마케팅 ㅇ 악기제작업 및 음악학원 종사자, 조율사 등	ㅇ 실용음악과 ㅇ 음악학과 ㅇ 국악과 등
공예․디자인 콘텐츠	ㅇ 공예작가, 공예 강사 ㅇ 공방, 공예 마케팅, 쇼핑몰 운영 ㅇ 공예회사 직원 등 ㅇ 디자이너 ㅇ 디자인 분야 회사원 등	ㅇ 도예과 ㅇ 디자인과 ㅇ 조소과 ㅇ 공예디자인과 ㅇ 산업공예과
게임콘텐츠	ㅇ 프로게임머 ㅇ 게임기획자, 게임시나리오작가 ㅇ 게임그래픽디자이너 ㅇ 게임사운드크리에이터 ㅇ 게임운영자, 게임장운영자, 게임마케터 등	ㅇ 게임공학과 ㅇ 게임멀티미디어학과 ㅇ 게임콘텐츠학과 ㅇ 게임소프트웨어학부 ㅇ 컴퓨터게임학부
첨단영상 콘텐츠	ㅇ 첨단영상 기획자, 멀티미디어에디터 ㅇ 웹 및 멀티미디어 디자이너 ㅇ 첨단영상기기 제조 및 운영자 ㅇ 첨단영상기기 운영자, 특수영상촬영기사 ㅇ 2D, 3D 변환 종사자 등	ㅇ 영상학과 ㅇ 첨단영상학과 ㅇ 멀티미디어학과
에듀테인먼트	ㅇ 매니저, 기획자, 제작자, 판매자 ㅇ 사이처(사이버 티처) ㅇ 사이트 운영자, 보안관리자 등	ㅇ 콘텐츠디지털학과 ㅇ 디지털미디어학과 ㅇ 디자인 에듀테인먼트 전공 등
전시콘텐츠	ㅇ 큐레이터, 학예사, 갤러리스트 ㅇ 전시디자이너 ㅇ 전시실 및 전시작품 설치 종사자	ㅇ 공연전시기획학과 ㅇ 컨벤션경영학과 ㅇ 컨벤션산업과 ㅇ 미술이론과 ㅇ 산업디자인과 등
공연콘텐츠	ㅇ 연기자, 무용가, 안무가 ㅇ 극작가, 공연기획자 ㅇ 무대감독, 미술감독 ㅇ 음향 및 녹음기사 ㅇ 소품담당자 등	ㅇ 연기(극)학과 ㅇ 연극영화과 ㅇ 뮤지컬과, 무대미술과 ㅇ 공연기획학과 ㅇ 예술경영과, 이벤트학과
관광콘텐츠	ㅇ 문화유산해설사 ㅇ 가이드, 관광통역 안내사 ㅇ 여행사, 렌터카 종사자 ㅇ 숙박․음식점․기념품센터 종사자 등	ㅇ 관광(개발)경영과 ㅇ 관광가이드학과 ㅇ 호텔경영학과 ㅇ 외식산업학과 ㅇ 관광외국어학과 등