제 안 요 청 서

사 업 명	국립중앙박물관 2024년 특별전 <고려시대 상형청자(가제)> 전시환경 조성
주관기관	국립중앙박물관

2024년 7월

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업책임자	전문경력관 가군	디자인팀	전배호	02-2077-9580
사업실무자	전문경력관 나군	디자인팀	박혜윤	02-2077-9582

I. 사업개요

1. 사 업 명

국립중앙박물관 2024년 특별전 <고려시대 상형청자(가제)> 전시환경 조성

2. 사업목적

○ 고려청자의 백미로 꼽히는 상형청자에 응축된 예술적 가치 조명

○ 최신 연구 성과와 국내외 주요 작품, 신자료를 활용하여 상형청자의 다채로운 양상과 함의 소개

○ 고려시대 상형청자의 현재적 가치에 대한 논의와 소통의 장 마련

3. 사업내용

가. 시설현황

○ 위치: 서울특별시 용산구 서빙고로 137 국립중앙박물관 특별전시실

○ 사업 연면적: 특별전시실 (벽부형S/C제외 면적) 621.95㎡

나. 사업범위

○ 전시기획에 따른 전시 연출 설계(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

○ 전시 연출을 위한 구조물집기 공장제작 현장설치(전시장 내부/외부)

○ 전시 진열장, 보조대 및 기타 전시 보조물 제작 설치

○ 전시 내/외부 그래픽제작 설치(텍스트패널, 설명카드, 이미지패널)

○ 기타 사업에 수반되는 행정소요 및 우리관 요구사항

○ 전시 종료 후 철거 및 원상 복구

다. 사업기간

○ 계약체결일로부터 2025년 3월 30일(철거 및 원상복구)까지

○ 전시기간 : 2024년 11월 26일(화) ~ 2025년 4월 3일(월)

○ 언론공개회(전시장조성완료) : 2024년 11월 25일(월)

① 발주 및 계약 : 2024. 7~8.

② 기획 및 설계 : 2024. 9~10.

③ 전시물 제작 설치 : 2024. 10~11.

④ 테스트 및 보완(시범운영) : 2024. 11.20 ~ 11.25.

⑤ 지침서 작성(준공서류 및 납품서류) : ~ 2024. 11.

⑥ 전시철거 : 2025. 3. 3. 이후 발주처와 협의한 날짜에 시행

라. 사업비

○ 사업예산 : 일금이억삼천팔백만원(238,000,000원, 부가가치세 포함)

○ 창작, 전시물 제작설치, 제세공과금 등 기타부대비용 일체 포함

4. 계약방식

○「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결)에 의함

5. 응모자격

○ 필요 시  공동이행방식 또는 분담이행방식 가능

○ 입찰자격 : 입찰공고서에 의함

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 기타자유업(행사대행업, 업종코드:9901), 실내건축공사업(업종코드:4990)으로 입찰참가자격을 등록한 자.

② 위 ①의 기타자유업(행사 대행업, 업종코드:9901)의 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제10조에 의한 직접생산확인증명서(세부품명:기타행사기획및대행서비스 세부품명번호: 8014199001)를 소지한자. 실내건축공사업(업종코드:4990)의 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 같은 법 시행령 제 10조에 의한 직접생산확인증명서(세부품명: 전시홍보관설치및디자인서비스 세부품명번호: 7215409902)를 소지한자.

③ 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <중소기업 소상공인 확인서(용도:공공기관 입찰용)?을 소지한자.

6. 제안일정

1	조달청 계약요청 의뢰	2024. 7
2	입찰공고 게시	입찰공고서 참조
3	제안서 및 입찰서 제출 ※ 현장설명회 없음	입찰공고서 참조

7. 제출서류 : 입찰공고서 참조

① 정성제안서 1식 : 제안서(A3 10매) 설계 설명서, 설계도, 예정공정표 등

② 정량제안서 1식 : 응모서류 (A4/내용: 서식 1 ～ 서식 8 에 해당하는 응모서류)

③ 기타서류(입찰참가자격 확인서류)

※ 제안서 등 제출서류는 나라장터를 통해 전자적으로 제출하여야 하며, 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출, 총 용량 300MB 미만

구분		제출서류	관련 서식	비고
사업 수행 능력 평가서	사업 수행 능력	① 사업수행능력평가서 표지	<서식 1>	· 해당하는 서류만 제출 · 해당기관의 전산용 증명원도 가능하나 본 서식의 내용을 포함해야 함.
		② 제안사의 일반현황	<서식 2>
		③ 사업수행 실적 증명서	<서식 3>
		④ 사업수행 실적 집계표	<서식 4>
		⑤ 기술인력 보유현황	<서식 5>
		⑥ 투입인력 계획	<서식 6>
		⑦ 신용평가 등급 확인서	<서식 7>
		⑧ 행정처분내용 확인서	<서식 8>
	입찰 참가 자격	① 서약서	<서식 9>
		② 위임장(대리인이 등록하는 경우)	<서식 10>
		③ 사용인감계	<서식 11>
		④ 인감증명서(법인/개인)
		⑤ 사업자등록증 및 법인등기부등본
		⑥ 경쟁입찰참가자격등록증
		⑦ 직접생산확인증명서
		⑧ 보안서약서	<서식 12>
		⑨ 개인정보 수집ㆍ이용ㆍ제공 동의서	<서식 13>
		⑩ 청렴계약이행서약서	<서식 14>
	공동 수급	① 제안응모 대표자 선임계	<서식 15>
		② 공동수급	<서식 16, 17>
기술제안서		① 기술제안서 표지	<서식 18>
		② 서면질의서	<서식 19>
		③ 제안서 본문 및 시안(작성방법 참조)

II. 제안지침

1. 기본지침

가. 기본방향

○ 상형청자의 전사(前史), 제작과 소비, 기종과 소재, 신앙 등 관련 내용 총망라

○ 우리 관 상형청자 조사사업(‘22~23년) 성과 및 과학적 조사, 미공개 소장품, 최신 발굴품 등을 활용하여 상형청자의 특징과 역사적 맥락을 밀도 있게 소개

○ 상형청자에 담긴 고려 최상의 기술력과 조형 감각을 직관적으로 느끼고 즐길 수 있도록 영상 제작 및 인테리어 연출

○ 대여 전시품의 전시환경 조건에 상응하거나 준용하는 공간 및 재료 환경 제시

○ 기존 전시 공간 및 자원을 활용한 친환경 전시 방향 제안

나. 일반 지침

○ 전시 목적과 제안 요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장여건을 고려하여 계획

○ 전시물은 관련규정 및 제반규정에 적법하게 제작 설치될 수 있도록 계획

○ 국립박물관의 위상에 맞는 품위 있는 전시 연출 계획 수립

○ 공공 문화시설로서 노약자 및 장애자의 편익과 안전성을 도모하는 계획 수립

○ 청소년 단체관람객의 전시실 관람시 안전성과 교육성이 고려된 계획 수립

○ 전시 조성 기간에 발생되는 전기 사용 요금을 납부한다.

○ 기존 각종설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 하되, 사전에 발주처와 의논하여 시공하며, 전시 종료 시 원상복구 한다.

2. 세부지침

가. 전시 공간

(1) 공간구성

○ 전시장의 관람 동선은 원활히 하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며 전시실 내부 관람객 휴게 공간을 고려하여 계획(전기배선 고려)

○ 전시 구성에 따른 관련 유물을 참고하여 계획 (유물 그룹핑 참조)

○ 전시 집기의 활용 및 추후 재활용을 염두에 둔 공간 및 집기 설계진행

(2) 색채구성

○ 전반적인 색채구성이 전체적인 조화를 이루고 전시주제와 맞도록 구성

나. 전시시설

(1) 전시공간연출

○ 전시실의 천장, 벽, 바닥, 홀 등의 마감 재료는 주위시설 및 조명에 조화되고 전시물 보존에 적합한 품목을 선정하여 계획

○ 유물 보존 및 관람환경을 고려하여 사전 제작 전시자재는 친환경자재를 사용

※ 작품의 안전을 고려해 벽체 및 진열장 구조, 재질이 고려되어야 함

※ 노출전시 필요시 발주처와 협의가 필요하고, 건축 환경(벽체, 벽부장 등)을 고려하여 공간연출 되어야함(소형작품은 모두 진열장 전시 필수)

※노출 시 인제책(작품과의 거리 1,000mm)을 고려 및 보안에 대해서도 제안

※대여 소장처의 환경 기준을 적용해 벽체구조 및 재질이 제작되어야 함

○ 진열장은 필요시 임시진열장(대여기관 기준고려) 신규제작. 유물 전시를 위한 진열장(의장, 시스템)은 보안, 안전, 밀폐성, 관리의 편리성 등을 최우선으로 고려하여 제작 설치(진열장 마감 유리는 접합유리 또는 안전필름 부착)

○ 친환경적 전시공간과 저탄소 실천을 위한 전시폐기물 배출 감소 방안 고려

※벽체구조물 및 진열장 일부의 재활용과 모듈벽체 사용 등 제안

(2) 전시보조자료 실물모형(전시대, 받침대) 설치

○ 전시연출에 필요한 받침대, 전시대, 기타 전시 사인물 등은 유물의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출

(3) 그래픽 및 홍보물

○ 발주처가 사전 공고한 그래픽, 배너리스트를 참고하여 제안하고, 전시설계, 구획설정, 내용전달 등에 따라 스카시·시트커팅·실사 등으로 하며 제작 중 수정·변경 가능

다. 제안 유의사항

○ 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택

○ 제안자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공 도중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계산치 않음

○ 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시기재

○ 시설물의 제작․설치 차후 부품교체, 하자보수, 전시장 철거 등 관리유지에 용이하도록 고려하여 제안

○ 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고, 구성과 관련한 기초 자료는 응모자가 조사 및 검토하여야 한다.

※ 별첨자료: 전시기본계획서 / 전시품목록 / 전시실 평면도 / 그래픽·배너리스트 등

3. 제안서 작성 요령   ※ 제안서 용지규격/페이지/제본/인쇄 등 형식적인 사항은 권고사항임

가. 제안서의 작성지침

(1) 제안서에는 제안요청서에서 요구한 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 함

(2) 제출된 제안서의 내용은 조달청에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주 함

(3) 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

(4) 응모서류는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성

4. 유의사항

가. 제안서 제출방법은 공고문 참조(나라장터)

나. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰참가자의 부담으로 함

다. 응모자는 제출된 제안서류에 대한 사실여부 등의 책임을 짐

라. 본 사업과 관련된 이의 및 이견이 있을 경우 응모자는 발주처의 해석에 따라야 함

마. 본 사업은 발주처의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우에 제안자는 발주처의 지시에 따라야 함

바. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출

사. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 평가함

아. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 함

자. 용역결과에 따른 산출물의 소유권은 국립중앙박물관에 있음

5. 착수 및 완료(결과보고)

가. 전시설계 및 제작은 계약일로부터 10일 이내에 착수해야한다.

나. 설계보완은 박물관의 최종승인을 받아야 한다.

다. 박물관의 지시에 따라 검토를 마친 뒤 세부지침서에 따른 결과물을 제출해야 한다.

라. 결과물은 계약 만료일까지 박물관에 제출하여 소정의 검수절차를 거쳐야 한다.

마. 박물관이 결과물에 대해 수정․보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후라도 제작자 부담으로 성실히 수정․보완하여 제출해야 한다.

바. 준공도서 상세내용

○ 최종 설계 도면 파일

○ 설명패널, 그래픽 원본 파일 / 홍보물 디자인 원본 파일

○ 내역서 2부

○ 전체 내용 및 기타 본 전시물 제작과 관련한 내용을 수록한 저장매체

6. 제안서 세부내용

구 분	내 용	매 수	비고
기술 제안서	전시컨셉 2. 전시평면 3. 실별 세부연출 4. 전시연출 상세(유물연출, 마감재, 색채, 조명, 친환경 계획 등) 5. 설계에 따른 공정 및 운영관리 ※ 위 내용이 포함되도록 10매 이내로 구성	총 10매 이내 (지정크기A3)		흑백 ․ 칼라

III. 제안서 평가

1. 평가일정 및 방법

가. 평가일정: 추후 통지

나. 평가방법

1) 기술 제안서의 평가는 100점 만점을 기준으로 하되 평균 점수가 85점 이상인 경우에 적합으로 평가

2) 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰

3) 수요기관은 제안서 평가를 위해 평가위원회를 구성하며, 본 사업의 특성을 고려한 평가기준에 의하여 제안서 평가를 실시

ㅇ 제안서의 공정한 평가를 위하여 각계 관련분야 전문가로 구성된 평가 위원회를 구성 ㆍ 운영

ㅇ 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 사전 비공개로 진행

ㅇ 업체별 평가총점을 기준으로 최고점수와 최저점수를 제외한 점수를 합산하여 평균점수를 산출하되, 최고 또는 최저점수가 둘 이상인 경우 하나만 제외

※ 평균점수는 소수점 셋째자리에서 반올림

4) 사업수행능력 평가는 객관적 지표에 의한 평가로서 정해진 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정

5) 제안서평가 기관(수요기관)의 장은 제안서 평가 종류 후 평가결과를

개별업체 통보(평가위원별 항목별 평가점수) 후 전자조달 시스템 또는

수요기관 정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은

비공개로 한다. 단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개 하지 아니할 수 있다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리 장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 한다.

2. 기술 제안서 평가항목 및 기준

가. 평가항목 및 배점기준

○ 제안서의 평가는 총점 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 80점(제안서평가 70점, 사업수행능력평가 10점), 입찰가격 20점으로 배점하여 평가하고, 종합평가 순위에 따라 최우수작으로 선정된 업체를 우선협상대상자로 한다.

구분	평가항목	세부 평가항목	배점		비고
사업 수행 능력 평가 (10)	사업수행실적	․ 입찰일 전일 기준 3년간 실적누계	4	10
	기술능력	․ 관련기술인력 확보	3
	경영상태	․ 기업신용도 평가등급	3
기술 제안서 평가 (70)	기획 및 연출방법	․ 공간 조성 및 연출 콘셉트 및 디자인의 창의성과 적정성	10	20
		․ 친환경적 전시연출 계획(모듈벽체,재활용등 고려)	10
	세부연출 계획	․ 전시기획과 디자인의 적정성과 독창성	10	30
		․ 공간 조성 및 연출 매체와 기법의 기술성 및 구현 가능성	10
		․ 마감재, 조명, 색채 구성의 적정성	10
	관리 및 운영계획	․ 관리 및 운영계획의 적정성 ․ 사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성	10	10
	안전/ 재난관리	․ 안전/재난관리 비상대책 수립	10	10
입찰가격(20)			20
계			100

(1) 기술제안서 평가: 70점

※ 기술능력평가는 별도 PT발표 없이 제안서 평가만 함

구분	평가항목	세부 평가항목	배점		비고
기술 제안서 평가 (70)	기획 및 연출방법	․ 공간 조성 및 연출 콘셉트 및 디자인의 창의성과 적정성	10	20
		․ 친환경적 전시연출 계획(모듈벽체,재활용등 고려)	10
	세부연출 계획	․ 전시기획과 디자인의 적정성과 독창성	10	30
		․ 공간 조성 및 연출 매체와 기법의 기술성 및 구현 가능성	10
		․ 마감재, 조명, 색채 구성의 적정성	10
	관리 및 운영계획	․ 관리 및 운영계획의 적정성 ․ 사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성	10	10
	안전/재난관리	․ 안전/재난관리 비상대책 수립	10	10
계			70

(2) 사업수행능력평가: 10점

ㅇ 사업수행실적

평가 항목	평 가 요 소	배점	평 가 방 법		비 고
			기 준	평점
수행 실적	본 사업규모(24억, 부가세포함) 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행(금액기준)실적 합산	4	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 40%미만	4.0 3.6 3.2 2.8	-실적인정범위: 공공 및 민간 실적(박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 전시관 등)의 전시연출 유사용역 및 시공실적 -건수 평가는 불가하고 실적금액으로만 평가

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

* 실적인정범위

국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간업체 등에서 발주하여 아래의 전시관에 설치

된 전시연출, 전시관: 과학관, 박물관, 체험관 등

* 준공(납품) 금액이 기재된 발주기관 발행 실적 증명서 사본(사실과 상위 없음 확인 날인 필)을 제출하여야 함(민간실적의 경우에는 계약서, 세금계산서를 제출해야 함)

* 실적증명서는 발급 후 1년 이내의 것만 유효함(입찰공고일 기준)

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 둘째자리에서 반올림함

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

ㅇ 기술능력

평가항목	배점	평가방법
기술능력	3 (최저 2.1점)	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
		0.5점	0.4점	0.3점	0.2점
		* 평점 = 인원 × 기술자별 점수 → 평점의 합이 최종점수(최고 3점 / 최저 2.1점)

※ 기술인력 등급기준은 ｢엔지니어링산업진흥법｣ 시행령 [별표 2] 준용

※ 입찰공고일 기준 3개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자(학위자)만 해당되며, 기술자와 학위자 중복 적용 불가[재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서(해당자), 국민연금관리공단 가입 확인서 첨부(필요한 경우 경력증명서 포함)]

ㅇ 경영상태

평가항목	배점	신용평가등급			평점
		회사채	기업어음	기업신용평가등급
경영상태	3	AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	3.0점 (배점의 100%)
		BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	2.85점 (배점의 95%)
		B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	2.7점 (배점의 90%)
		CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.1점 (배점의 70%)

※ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

※ 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

다. 가격평가: 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰

3. 기타

가. 유의사항

1) 상기 기술한 내용 외에 평가진행 사항은 공개하지 않음

2) 발주기관은 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 제안업체는 심사위원 구성, 심사기준, 심사결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없음

3) 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함

4) 제출한 기술 제안서에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없음

5) 계약 후 발주기관과 협의하여 수정, 보완 또는 추가 조정하며 필요한 경우 발주처의 의견을 반영하여야 함

6) 기타 명시되지 않은 사항은 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 등 관련 규정을 준용해야 함

7) 본 지침의 해석상 이견이 있을 때에는 발주기관의 해석에 따름

나. 저작권 및 사용권

1) 타인의 지적 재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 낙찰된 제안 업체에 책임이 있음

2) 발주기관은 협상 대상 제안서의 수정‧보완 및 변경에 대한 일체의 우선적 권한을 가짐

3) 본 수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 발주기관에 귀속됨

4) 제3자의 저작물을 이용한 경우 사전에 제3자에게 저작재산권을 양도받거나 이용 허가를 받음으로써 발주기관이 해당 산출물을 이용함에 있어서 법적 또는 기술적 문제가 발생하지 않도록 함

5) 성과물 중 사진 저작물에 인물이 포함된 경우 제3자가 해당 저작물을 이용하는데 초상권에 관하여 민형사상 책임이 발생하지 않도록 함

6) 본 사업수행과 관련한 국가 간, 기관 간의 협약에 의해, 성과물의 사용 및 배포에 제한이 있을 수 있음

[서식 1호]

2024년 특별전 <고려시대 상형청자(가제)> 전시환경 조성 제안서 응모 신청서
접 수 번 호		2024 -
접 수 일 자		2024년 월 일
제 출 자 (대 표 사)	업 체 명
	대 표 자
	주 소
	전 화	TEL : FAX :
국립중앙박물관에서 시행하는 「2024년 특별전 “고려시대 상형청자(가제)”」 제안에 필요한 서류를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 국립중앙박물관장 귀하

[서식 2호]

제안사의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

[서식 3호]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립중앙박물관
	증명서용도		2024년 특별전 “고려시대 상형청자(가제)” 전시설계 및 제작 설치 실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식 4호]

사업수행능력 자기 평가표

항 목 (총 10점)	세 부 항 목		배 점	평 점	비고
사업수행 실적 (4점)	본 사업 규모 (24억1천만원, 부가세 포함) 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행 실적 합산 (금액기준)	A. 100% 이상	4.0
		B. 70% 이상~100% 미만	3.6
		C. 40% 이상~70% 미만	3.2
		D. 40% 미만	2.8
기술능력 (3점)	참여 기술자 등급별 인원수× 등급별 점수 ※ 최저 2.1점 / 최고 3점	A. 특급기술자 0.5			( )명×0.5점
		B. 고급기술자 0.4			( )명×0.4점
		C. 중급기술자 0.3			( )명×0.3점
		D. 초급기술자 0.2			( )명×0.2점
경영상태 (3점)	기업 신용도 평가등급	회사채 BBB0, 기업어음 A30, 기업신용평가등급 BBB0 이상 등급	3.0
		회사채 BB-, 기업어음 B0, 기업신용평가등급 BB- 이상 등급	2.85
		회사채 B-, 기업어음 B-, 기업신용평가등급 B- 이상 등급	2.7
		회사채 CCC+ 이하, 기업어음 C 이하, 기업신용평가등급 CCC+ 이하	2.1
계

[서식 5호]

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축 기 술 자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○○
기타

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링사업

대가의 기준에 따르며 <별첨5>참조, 공고일 기준 2개월 이상 입사한 자로 본

사업에 참여할 기술자만 명기

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 자격증, 최종학력증명서, 경력증명서 및 4대 보험 확인서 첨부

[서식 6호]

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다

교부일  2024   .   .

신용평가기관 :                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식 7호]

행정처분내용

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

[서식 8호]

서     약     서

국립중앙박물관에서 추진 중인 「국립중앙박물관 2024년 특별전 “고려시대 상형청자(가제)” 전시환경 조성」 입찰에 참여한 당사는 국립중앙박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2024 년     월      일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립중앙박물관장 귀하

[서식 9호]

서   면   질   의   서

발송일시	년 월 일
제 안 서 접수번호		연락처	전화 : fax :
업 체 명	(대표: )
제안서 쪽수
질의내용	※ 제안지침서를 다시 한번 숙지하시어 질문하여 주시기 바랍니다. ※ 명료하게 작성요망바랍니다.

[별지 10호] 기술능력 제안서표지양식 (참고용)

실크로드

1. 표지크기 : A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 굴림체, 흑색사용

4. 글자크기 : 제목 30, 72호, 날짜. 22호, 식별번호 22호

국립중앙박물관 2024년 특별전 “고려시대 상형청자(가제)” 전시환경 조성 제안서

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

7. 제안서 심사에 제출하는 모든 문서의 여백, 앞뒤, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는 공모업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 하며, 인지할 수 있다고 객관적으로 판단되는 특정표기가 발견될 시 공정한 심사를 위해 임의로 삭제할 수 있음.