｢웹툰 IP 첨단클러스터 조성 타당성 연구｣

제안요청서

2024.  3.

사 업 책임자	문화체육관광부 대중문화산업과		FAX: 044-203-3453
	과 장	김혜수	TEL: 044-203-2461
담당자	사무관	허진웅	TEL: 044-203-2463
	주무관	김해강	TEL: 044-203-2466

		목 차
	Ⅰ. 용역 개요 1 Ⅱ. 과업 세부내용 2 Ⅲ. 과업 수행지침 6 Ⅳ. 사업자 선정 방법 8 Ⅴ. 평가기준 10 Ⅵ. 제안서 작성 방법 12 [별지 서식] 제1호 제안서 표지 15 제2호 일반현황 및 연혁 16 제3호 연구용역수행 조직 및 인원현황 17 제4호 참여인력 이력사항(총괄표) 18 제5호 참여인력 이력사항 19 제6호 서약서 20

I

용역 개요

1. 과업명 : 웹툰 IP 첨단클러스터 조성 타당성 연구

2. 추진배경 및 목적

ㅇ (추진배경) 국가 문화콘텐츠 분야 정책*과 부합한 웹툰 산업 육성 및 생태계 조성을 위한 지역 만화·웹툰 거점 클러스터 조성 추진

* 문체부(2024.1.23.) 「만화·웹툰 산업 발전 방향」 내용 중 “만화·웹툰 산업 클러스터”를 통한 창·제작, 인력양성, 기업육성, 전시시설이 집약된 지역 거점 조성

ㅇ 고도화된 산업환경에 부합한 웹툰제작, 기업육성, 인력양성 등의 기업 종합지원을 위한 대전 웹툰클러스터 건축·운영계획(안) 제시

3. 과업범위

ㅇ 경제적 타당성 분석(비용·수요 추정, 편익 분석 등)

ㅇ 정책적 타당성 분석(사업추진 여건, 정책효과 분석 등)

ㅇ 건축 기본계획 제시(사업운영전략 수립, 건축계획 및 규모 적절성 검토 등)

4. 연구기간 : 계약체결일로부터 150일

5. 입찰방법 / 선정방식 : 공개경쟁입찰(제한경쟁) / 협상에 의한 계약

6. 예산 : 200백만원 (부가세 포함)

Ⅱ

과업 범위 및 세부내용

1. 과업 내용

가. 타당성조사(경제성, 정책성, 파급효과, 영향평가 사전검토 등 현황조사)

1) 경제적 타당성 분석

· (1-1) 비용 추정

- 건축 기본계획 수립 기준 총사업비 도출(공사비, 부대비, 보상비, 예비비 등)

- 기재부 예산 편성지침, 국토부 등 관계 법령·지침 등 준용 세부내역별 산출

· (1-2) 수요 추정

- B/C 분석용 수요조사지 개발, 웹툰 기업(예비창업작가) 등 대상 조사 수행

- 분석결과 기반 편익 분석, 경제성(B/C) 분석 수행

· (1-3) 편익 분석

- 동 사업과 부합한 편익항목 도출(부가가치, 비용 절감, 시설보유 등)

- 편익 산출식 설정, 수요조사 데이터 기반 편익 분석 수행

· (1-4) 경제성 분석(B/C, NPV, IRR), 재무성 분석(PI), 지역경제파급효과 분석

- 경제성(사회적 편익), 재무성(수입/지출), 파급효과(I/O 분석) 결과 제시

- 경제성 분석은 총사업비를 추정하여 순현재가치(NPV), 내부수익률(IRR), 민감도 분석(비용편익 증감, 사회적할인율 등 변수 변화) 결과 제시

- 재무성 분석은 부대시설(교육실) 이용료, 사용료 등 직접 수익이 발생하는 사업의 경우 재정수지전망 등 구체적인 연차별 현금흐름(수입/지출) 기술

- 지역경제 파급효과는 부가가치, 생산, 취업 유발계수 및 효과를 도출, 지역낙후도 등 분석 수행

· (1-5) 기타 국가 법령·지침에 필요한 타당성 조사 항목·내용 등

‣ 기재부 예비타당조사, 행안부 지방재정투자사업 심사 등 지침 준용

2) 정책적 타당성 분석

· (2-1) 사업추진 여건분석(내·외부 여건분석)

- (외부) 국가·지자체 관계 법령·정책과 사업과의 부합성(정책 일치성) 등

- (내부) 대전시 콘텐츠 분야 정책, 제작 인프라, 지원사업, 기존 웹툰 IP 첨단 클러스터 관련 사업 준비내용 조사(MOU, 간담회, 협의회, 행사 등)

· (2-2) 정책효과 분석

- 일자리 효과 분석, 생활여건 영향분석, 환경성 평가, 안전성 평가 등 검토

- 사업을 통해 주변에 영향을 미치는 생활여건 개선점, 주변 환경에 미치는 영향(소음, 자연경관, 공해, 환경오염 등), 안전성(재난·재해 등) 검토 수행

· (2-3) 기타 국가 법령·지침에 필요한 타당성 조사 항목·내용 등

‣ 기재부 예비타당조사, 행안부 지방재정투자사업 심사 등 지침 준용

나. 건축 기본계획 제시

1) 웹툰 산업환경 및 사업 운영전략 수립

· (1-1) 전문가, 관계자 등 관련 단체 의견조사(협의회 운영, 인터뷰, 설문 등)

‣ 웹툰 산학관 협의체(자문) 운영을 통한 웹툰산업 문제/이슈, 사업의 필요성, 정부지원 요구사항, 웹툰 클러스터 공간구성(H/W), 운영방안(S/W) 등 도출

· (1-2) 국내외 웹툰 산업 환경분석(시장, 인력, 기업, 기술, 비즈니스 현황 등)

· (1-3) 정부·지자체 웹툰 분야 관계 법령·정책, 웹툰 분야 지원시설·사업 조사

· (1-4) 환경분석 결과에 따른 대전시 웹툰 산업 육성 중장기전략(안) 도출

‣ 사업 추진체계(거버넌스) 및 추진전략(핵심분야, 전략과제 등) 수립

‣ 웹툰 IP 제작 및 OSMU 사업화 지원 등 핵심 전략 및 추진과제 등 수립

‣ 대전시가 보유한 콘텐츠산업 시설/사업 연계 및 산학연관 협력방안 수립

‣ AI·메타버스(XR) 등 신기술 활용 웹툰제작, 실무형 인재양성 계획 수립

‣ 대시민 문화향유를 위한 입주기업(작가) 작품 국내외 마케팅·홍보 전략

‣ 공간(입주실, 교육실, 회의실, 전시공간 등) 활용 활성화, 기업유치 전략 등

2) 건축 기본계획(기본구상) 수립

· (2-1) 현황조사 및 분석결과 바탕 비전, 목표(방향), 전략 등 설정

- 기존 사업과의 차별성 및 연계방안 등 운영전략 제시

· (2-2) 배치계획 및 시설별 공간 구성안 제시

- 평면구성, 외부디자인, 시설 내역 등을 포함한 개괄적인 기본도면(안) 제시

- 평면계획(안), 입면·단면계획(안), 조성계획도(안), 조감도·투시도 등 작성

· (2-3) 원활한 건축 추진을 위한 프로세스(로드맵) 제시

· (2-4) 클러스터 완공 후, 사업 운영관리 방안

- 운영 기능 및 프로그램 구성(사후 기업지원 사업, 행사 등 프로그램 제시)

- 클러스터 조성(H/W) 및 지원사업 등 프로그램(S/W) 이원화하여 방안 도출

- 시설운영(H/W) 및 사업운영(S/W) 계획에 따른 조직(팀) 구성 방향 등 제시

· (2-5) 기타 국가 법령·지침에 필요한 건축 기본계획 수립 항목·내용 등

3) 건축계획 및 규모의 적절성 검토

· (3-1) 적정 면적, 규모, 토지이용계획, 후보지 검토, 법적 검토 수행

· (3-2) 적정 사업 기간 총사업비 검토 및 운영기간 비용 산출

- 사업기간, 공사비, 부대비, 토지비(감정평가, 공시지가 검토) 등 총사업비 산출

- 운영방안에 따라 소요되는 운영비, 인건비, 시설유지관리비 등 운영예산 산출

‣ 운영비용 충당을 위한 재정 확보 및 부대시설 수익성 확보방안에 관한 사항

‣ 운영비 확보 방안, 운영수지 산출, 활성화 방안

‣ 운영계획과 수요에 따른 수입 측정(적정 관람료 및 이용료 산출)

· (3-3) 사업 추진을 위한 건축 및 정부 심사/평가 등 프로세스(로드맵) 제시

· (3-4) 재원 조달방안 및 연차별 투자계획 수립

- 재정투자, 민간투자개발 사업 등 재원조달 방안 비교분석 및 최적안 제시

- 연차별 재원 투자계획 수립

· (3-5) 기타 국가 법령·지침에 필요한 건축 기본계획 수립 항목·내용 등

다. 향후 각종 심사평가 대비를 위한 제반사항

· 공공 건축심의, 지방재정투자심사 등 행정절차 이행을 위한 객관적인 자료 작성 제출 및 협력 지원, 연구 관련 각종 보고에 대한 업무 지원 등

2. 연구방법

가. 문헌조사

ㅇ 만화·웹툰 분야 법령·정책, 시장·산업 동향 등 관련 문헌·보고서 검토

ㅇ 기존 만화·웹툰 분야 유사 인프라 현황, 지원사업 등 관련 사례조사

ㅇ 정부 평가·심사(타당성조사, 건축 등) 관련 법제도·지침 등 검토

나. 전문가 자문위원회 운영

ㅇ 웹툰 분야 전문가 인터뷰 및 의견수렴 협의회 개최(2회 이상)

ㅇ 웹툰 분과(협회, 기업, 대학, 기관 등), 건축·경제 분과 등 산학관 전문가 중심 자문위 운영, 공간 건축 및 사업운영 방향 도출

다. 이해관계자 공청회, 사업 관련 기업(입주) 수요조사

ㅇ 웹툰 클러스터 관련 이해관계자(기업, 작가) 공청회 개최(1회)

ㅇ 경제성(B/C 분석), 입주의향 관련 설문 수행(기업 수요조사, 1회)

3. 보고 및 성과물 제출

가. 연구보고

ㅇ 착수보고

- 계약일로부터 10일 이내에 조사목적, 조사내용, 조사방법, 세부일정, 참여인력 등을 포함한 세부 추진계획서 작성‧제출

ㅇ 수시보고

- 추진상황에 대하여 발주처의 요구 시 수시 보고

- 요청 시 현안(국회요구자료 등) 대응 및 검토

- 중간 보고(계약일로부터 2개월 후/조정 가능)

- 기타 변경사항(업무 수행방법, 참여인력 변경 등/반드시 사전 협의) 발생 및 위험 요소(업무 지연 요인, 환경 변화) 감지 시 조치방안 등 보고

ㅇ 결과보고

- 계약기간 종료 10일 이전에 결과 보고자료 제출

나. 성과물 제출

ㅇ  착수보고서 : 인쇄본 40부(전자파일 포함)

ㅇ  중간보고서 : 인쇄본 40부(전자파일 포함)

ㅇ  최종보고서 : 인쇄본 40부, 전자파일 1식(PDF, 한글 형식의 전자파일, 분석 데이터 등 중간 성과물 일체)

※ 착수·중간·최종보고서발표 내용 포함

Ⅲ

과업 수행지침

1. 관계법규 준수, 주관기관 해석 등

ㅇ 본 과업 지시서는 사업의 원활한 수행을 위하여 필요한 사항을 규정하며, 여기에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령 등에 의거하여 수행해야 함

ㅇ 또한 과업수행기관은 과업을 수행함에 있어 계약서와 본 지시서에 의한 과업의 세부내용을 정확히 파악하고 과업을 수행하여야 하며, 본 지시서의 해석상 이의가 있을 때에는 상호협의에 의해 해결하고, 합의가 되지 않을 경우에는 분쟁해결 절차에 따름

2. 의견수렴 및 인력 구성

ㅇ 과업수행 중에 주관기관이 요구하는 내용은 상호 협의하여 과업에 추가로 반영토록 하며, 본 과업을 수행함에 있어 과업내용의 변경이 필요한 경우에는 상호 협의하여 결정하고, 계약금액이 변경될 경우는 변경계약을 한다.

ㅇ 과업수행기관은 본 사업 취지에 맞도록 다양한 분야 의견수렴을 실시하고 담당자와 협의를 통해 논의되고 수렴된 의견을 과업에 반영하여야 함

ㅇ 본 과업에 참여하는 인력은 관련 분야에 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 연구가 추진되도록 하여야 함

ㅇ 과업 참여인력 구성이 부적합하다고 판단되어 수정을 요구하는 경우, 과업수행기관은 이를 수용하여야 함

ㅇ 책임자를 비롯한 용역수행자의 변경 시 즉시 문화체육관광부에 통지하여야 함

3. 보안유지

ㅇ 과업수행기관은 과업참가자의 보안관리 이행각서를 제출하여야 하고, 본 과업을 수행함에 있어 취득한 제반 보안사항에 대하여는 철저히 보안을 유지하고 과업이 완료된 후에도 이를 엄수해야 함

ㅇ 본 과업에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않은 목적으로 사용할 수 없으며, 사전승인 없이 타인에게 제공 또는 대여할 수 없음

ㅇ 과업수행기관은 본 과업 수행 시 보안사항 불이행으로 발생된 제반문제에 대하여 배상 등 모든 책임을 져야함

ㅇ 과업수행기관 및 참여인력은 주관기관의 승인 없이 사업결과를 대외적으로 발표하거나 제공할 수 없음

ㅇ 과업수행기관은 주관기관으로부터 대여․제공 받은 제반 자료를 본 계약의 목적 외에는 사용하지 아니함

ㅇ 과업수행기관은 과업수행 중 취득한 자료를 주관기관의 허락 없이 누설할 수 없음

ㅇ 과업수행기관은 주관기관의 보안요청 사항을 준수하여야 함

4. 저작권

ㅇ 본 용역수행의 결과로 발생하는 모든 성과물의 지식재산권은 용역계약일반조건 및 일반용역계약 특수조건에 의함

5. 기타사항

ㅇ 본 과업 완료 후라도 본 과업과 관련해서 주관기관의 재검토 및 보완 요구사항 등에 대해서는 과업수행자로서 제반사항에 대하여 성실히 이행하여야 함

ㅇ	용역계약서 및 제안요청서에 명시되지 아니한 사항이나 자구의 해석에 대해 이견이 있을 때에는 상호협의에 의해 해결하고, 합의가 되지 않을 경우에는 분쟁해결 절차에 따름

ㅇ 과업 수행과 관련하여 민원이 발생하지 않도록 신중을 기하여야 함

ㅇ 과업 수행 중 의문사항이나 문제점이 있으면 주관기관과 협의하여 처리하여야 함

ㅇ 본 과업수행 중 수행기관의 귀책사유로 발생한 모든 문제에 대하여는 수행기관이 책임을 지며 주관기관에 손해를 입힌 경우 이를 배상함

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조 제2항 제2호의 계약 주요 조건을 위반한 경우 ‘부정당업자 입찰참가자격 제한처분’을 받을 수 있음

Ⅳ

사업자 선정 방법

1. 선정개요

ㅇ 입찰방법 : 제한경쟁

ㅇ 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약

ㅇ 적용근거

-「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

-‐협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규) 등

2. 입찰참가 자격

ㅇ「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁 입찰의 참가자격을 구비한 자

- 조달청에 학술연구용역(업종코드 1169)으로 입찰 참가자격을 등록한 자

ㅇ「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업자 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서, 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <중·소기업 소상공인 확인서>를 소지한 자

* 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3 제1항 제2호에 따라 비영리법인은 중·소기업·소상공인확인서가 없어도 입찰 참가 가능

※ 공동수급 불가

3. 선정방법

가. 제안서 심사

ㅇ 각 업체별 20분 이내 프레젠테이션을 통한 제안 설명

※ ‘제안 설명 및 평가회의’에 참석하지 않은 업체는 제출된 서면 제안서에 의해서만 평가. 일정과 장소는 추후 개별적으로 공지

나. 제안서 평가

ㅇ 제안자가 제출한 제안서 및 예산 세부내역 등 일체의 서류, 프레젠테이션 및 질의응답 등을 기초로 평가 실시

- 기한 내 요구 서류를 제출하지 않거나 제출된 서류 등이 미비․불명확한 경우에는 제출된 서류만으로 심사

ㅇ 제안서의 공정한 평가를 위하여 내․외부 전문가로 구성된 제안서평가위원회 구성(7인 이상, 외부위원 과반수)

- 평가위원의 실명은 공개하지 아니할 수 있으며, 제안서 제출자는 선정결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

ㅇ 제안서는‘기술제안서 평가기준’에 따라 평가

ㅇ 기술능력평가 점수(80점)의 85% 이상을 얻은 자를 협상 적격자로 선정

다. 협상절차 및 내용

ㅇ 기술능력평가 점수(100분의 80)와 입찰가격평가 점수(100분의 20)를 합산한 종합평가결과 고득점 순위에 따라 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 차순위 협상적격자와 협상을 실시하지 않음

ㅇ 협상대상자가 제안한 과업내용, 이행일정 및 방법, 문화체육관광부에서 권유한 사항 등을 협상내용에 반영하여야 하며, 향후 우선순위협상대상자와 추가 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

Ⅴ

평가기준

1. 평가항목 및 배점

평가항목		평가기준	점수
	Ⅰ. 기술능력평가		80
	1. 과업의 이해도 (15)	과업의 목적, 사업에 대한 이해도 등	15
		- 사업추진 방향 및 목적 부합성	5
		- 정책 및 사업추진 현황에 대한 이해도	5
		- 과업범위 설정의 적절성	5
	2. 수행계획의 적절성 (30)	과업수행계획의 일정 및 내용 등	30
		- 과업수행계획의 체계성 및 전문성	10
		- 과업수행방법의 구체성 및 타당성	10
		- 과업일정의 합리성 및 적합성	10
	3. 수행체계의 적절성 (20)	투입인력의 전문성, 업무분담 적정성 등	20
		- 인력투입 및 업무 분담의 적정성	10
		- 과업참여자의 전문성	10
	4. 기관의 수행능력 (15)	연구인력 보유수, 신뢰도 등	15
		- 품질보증 관리능력(위험관리, 진도관리, 보안관리, 문서관리 등의 적정성)	5
		- 수행기관의 대외 이미지, 발주처와의 지속적인 업무제휴 가능 정도 등에 대한 총괄평가	10
Ⅱ. 입찰가격 평가		협상에 의한 계약체결기준 평점산식 적용	20
총 점		-	100

2. 세부 평가기준

ㅇ 항목별 평가기준

등급	A(매우우수)	B(우수)	C(보통)	D(미흡)
환산율	100%	80%	60%	40%

ㅇ 최종점수 산출

- 항목별로 평가위원의 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고 나머지 평가위원의 점수를 평균하여 획득점수를 산출

- 평가점수가 소수점 이하가 있는 경우 소수점 셋째 자리에서 반올림 함

ㅇ 입찰가격평가

- 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규), 제7조 관련 별표의 입찰가격 평점산식에 따름

ㅇ 종합평점 결과 최고점수를 얻은 자가 복수인 경우 기술능력평가 점수가 높은 제안자를 우선협상대상자로 선정하며, 기술평가점수가 동일한 경우에는 기술능력의 세부항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선순위로 함

Ⅵ

제안서 작성 방법

1. 제안서 규격

ㅇ 나라장터 e-발주시스템을 통해 PDF 형식으로 제출

ㅇ 제시된 목차의 예시를 따라 구성하는 것을 원칙으로 하되, 변경 가능

ㅇ 30페이지 이내(20분 이내 PT 발표)로 작성. 분량 준수 요망

ㅇ 페이지 하단 중앙에 쪽번호 기재

ㅇ 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있는 자료는 제안서 후단에 첨부물로 포함하여 제출하여야 함(별도 제출자료 미접수)

2. 제안서 목차 구성(안)

작 성 항 목	작 성 내 용
■ 요약	ㅇ10페이지 이내
1. 제안개요	ㅇ제안의 필요성, 범위, 주요내용 등을 요약하여 기술
2. 제안업체 현황 가. 조직․인원 나. 주요특성	ㅇ연구 수행 기관 및 인원 현황(별지서식2, 3) ㅇ제안업체의 주요 특징, 장점 등
3. 사업수행 계획 가. 사업내용 나. 세부 추진계획 다. 추진 일정 라. 과제수행 인적구성 및 업무분장	ㅇ사업수행 세부계획 구체적으로 제시 - 사업수행 체계도 및 업무분장 - 추진 일정 - 인력투입 계획(별지서식4, 5) - 세부추진 방법 및 내용, 실행계획 등 사업 수행방안 제시

3. 제안서 제출

ㅇ 제출일시 및 제출처 : 입찰공고에 따름

ㅇ 제출서류 : 제안서 및 제안요약서는 온라인 제출

- 추후 평가를 위한 자료 요구 시 제출 사항(제안서 7부*)

* 문체부 대중문화산업과에 제안서(인쇄본 7부) 제출

ㅇ 제안서는 공고문에 따라 작성․제출하며, 제출일시에 제출하지 않은 경우 제안 의사가 없는 것으로 처리함

* 문의처 : 문화체육관광부 콘텐츠정책국 대중문화산업과

- 허진웅 사무관(044-203-2463), 김해강 주무관(044-203-2466)

4. 유의사항

ㅇ 제안서 내용에는 발주처의 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 포함되어야 함

ㅇ 제안서 작성 시 모호한 표현은 지양하고 명확한 용어를 사용해야 함

ㅇ 기재사항이 누락되거나 제안요청 내용에 대해 언급이 없는 항목은 해당사항이 없는 것으로 간주함(해당사항이 없을 경우 “해당없음” 으로 간략히 기술)

ㅇ 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완 요청을 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

ㅇ 제안내용 중 기술적 판단이 필요한 부분은 관련 증빙자료를 제안서의 붙임으로 제시함

ㅇ 제안서 등 제출된 자료의 내용이 허위사실로 인정될 경우 해당 입찰참가자는 평가대상에서 제외함

ㅇ 입찰참가자는 입찰과정에서 취득한 정보와 계약 이행과정에서 취득한 각종 정보를 제3자에게 누설해서는 안 됨

ㅇ 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌을 활용할 경우 그 출처를 명시하여야 함

ㅇ 제안서에 제시된 내용은 입찰참가자가 계약자로 선정된 후 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서 내용이 우선하며 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생한 경우에는 상호협의에 의해 해결하고, 합의가 되지 않을 경우에는 분쟁해결 절차에 따름

ㅇ 우선순위 협상대상자의 제안내용이 불충분할 경우 추가협상을 할 수 있으며 협상내용은 계약서의 일부가 됨

ㅇ 본 제안에 따른 제반 비용은 제안자가 부담함

ㅇ 제출된 제안서는 발주처가 요청하지 않는 한 수정․삭제․대체될 수 없음

ㅇ 제안서 관련 제출서류는 심사용으로만 활용됨

ㅇ 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관련 증빙서류를 첨부하여야 하며, 제출된 자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 평가대상에서 제외됨은 물론 계약 체결 후라도 계약해지와 함께 민․형사상 책임을 짐

ㅇ 본 제안요청서의 결과에 의한 일체의 계약은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법규를 준수하여야 함

<별지서식 1>

접수번호

‘웹툰 IP 첨단클러스터 조성 타당성 연구’ 수행용역

제  안  서

2024.  .  .

◦ ◦ ◦ ◦(업체명)

<별지서식 2>

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
연 락 처	전화 : FAX :
회사설립년도	년 월
해당부문 사업기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요 연혁

<별지서식 3>

연구용역 수행 조직 및 인원현황

1. 연구책임자 및 인원 현황(2024년 00월 기준)

2. 본 사업 수행조직 및 인원현황

			사 업 책 임 자
			직위, 성명
부문			부문				부문			부문
직위, 성명			직위, 성명				직위, 성명			직위, 성명

※ 부문별 책임자를 명시하고, 평가 시 참고가 될 수 있도록 직위 순으로 기재

※ 본 과업에 참여하는 인원 전부를 기재할 것(증명서류가 첨부되지 않은 경우 인정되지 않음)

<별지서식 4>

참여인력 이력사항(총괄표)

구 분	성명	연령	직위	학위 (학력)	전공	사업참여 경력건수	비고

※ 구분란에는 책임연구원, 연구원, 연구보조원 등으로 구분 기재

<별지서식 5>

참여인력 이력사항

성 명			소 속		직 책		연 령	세
학 력*					해당분야근무경력		년 개월
					자 격 증
본사업참여임무				사업참여기간			참여율	%

경 력
사 업 명	참여기간 (년 월～년 월)	담당업무	발주처	비고

* 학력란에는 전공만 기재(대학교 및 대학원명은 기재 불요)

<별지서식 6>

서   약   서

단체(회사)명 :

주        소 :

본인은 『웹툰 IP 첨단 클러스터 조성 타당성 연구』수행 용역에 참가함에 있어 귀 부가 결정한 평가결과를 수용하고 평가와 관련하여 추후 이의 제기를 하지 않을 것을 서약합니다.

2024.    .     .

상호 또는 명칭 :

주          소 :

전  화  번  호 :

대 표 자 성 명 :                              (인)

법인  등록번호 :

문화체육관광부장관 귀하