제 안 요 청 서

사 업 명	2024년 특별전 <기록(가제)> 전시연출 용역
주관기관	국립청주박물관

2024.  3.

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업책임자	학예연구실장	국립청주박물관	박성원	TEL: 043)229-6400
사업실무자	학예연구사	국립청주박물관	김선미	TEL: 043)229-6402

Ⅰ

사업개요

1. 사 업 명

: 2024년 특별전 <기록(가제)> 전시연출 용역

ㅇ 사 업 명 : 2024년 특별전 <기록(가제)> 전시연출 용역

ㅇ 사업기간 : 계약일 ~ 2024. 11. 29. (철거 및 원상복구 포함)

※ 전시기간 : 2024. 6. 25. ~ 2024. 11. 3.

ㅇ 사업장소 : 국립청주박물관 특별전시실 522㎡

ㅇ 사 업 비 : 150,000,000원(부가세 포함)

2. 사업목적

가. ‘직지’의 고향인 청주에서 기획한 선사시대부터 근대에 이르는 기록을 사용자  입장에서 조망하는 전시

나. 충북지역 기록 문화유산 기반의 국립청주박물관 국내·외 순회전시 패키지 개발

다. 국립충주박물관 건립 이후 상설전시 개편을 위한 예비적 전시

3. 사업개요

가. 시설현황

(1) 위치: 충청북도 청주시 상당구 명암로 143 국립청주박물관 특별전시실

(2) 사업 연면적: 특별전시실 522㎡(특별전시실 도면 참조)

* 전시 면적, 규모는 향후 세부 과업 내용 확정에 따라 조정될 수 있음

나. 사업 범위

(1) 전시기획에 따른 전시연출 실시설계(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

(2) 전시연출을 위한 구조물 제작 설치(전시장 내부/외부) 및 철거(원상복구)

(3) 전시 진열장 제작 설치

(4) 전시 받침대(유물 보조대 포함) 제작 설치

(5) 전시연출에 따른 전시실, 구조물, 조형물 도색

(6) 전시 내/외부 그래픽 제작 설치(텍스트 및 이미지패널, 설명 및 네임카드)

(7) 전시매체(체험/모형/홍보물) 제작 설치(필요시)

(8) 전기 및 조명 등 관련 설비 보완 및 설치

(9) 모형 및 미디어 시설 설치를 위한 전기 설비(필요시)

(10) 기타 사업에 수반되는 행정소요 및 우리관 요구사항

다. 사업기간 : 계약일로부터 2024. 11. 29.(금)까지

※ 전시기간 : 2024년 6월 25일(화) ~ 2024년 11월 3일(일)

(1) 용역 발주 및 계약: 2024. 3. ~ 4.

(2) 전시기획 및 설계: 계약체결일 ~ 2024. 5.

(3) 전시물 제작·설치: 2024. 5. ~ 6.

(4) 도색 및 사인물 설치: 2024. 5. 27.(월) ~ 6. 7.(금)

(5) 전시품 디스플레이: 2024. 6. 17.(월) ~ 6. 19.(수)

(6) 전시실 시범운영 및 최종점검: 2024. 6. 20.(목) ~ 6. 21.(금)

(7) 전시개막: 2024. 6. 25.(화)

(8) 전시보완: 2024. 6. 24.(월) ~ 7. 8.(월)

(9) 준공서류 및 납품서류 제출 : ~ 2024. 7. 8.(월)

(10) 전시 철거 및 원상 복구: 2024. 11. 3. 이후 우리 관과 협의 후 시행

* 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

* 전시품 디스플레이 기간 전까지 전시품 반입이 가능한 환경 마련 필수(그래픽 및 영상 세팅을 제외한 준공청소 포함 거의 모든 공정 완료)

* 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 전시 철거 시까지

라. 사업예산 : 금150,000,000원(금일억오천만원, 부가가치세 포함)

* 창작, 전시물 제작·설치, 영상, 디지털 콘텐츠, 음향 제작‧설치 및 철거, 제세공과금,  보험료 등 기타부대비용 일체 포함

4. 계약방식

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결)에 의함

5. 입찰방식 및 낙찰자 결정 방법

가. 입찰방식: 제한경쟁입찰

나. 낙찰자 결정 방법: 협상에 의한 계약

(1) 기술능력평가 결과 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정

(2) 협상순서는 기술능력평가와 입찰가격평가 합산점수의 고득점 순에 따라 결정

(3) 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력평가점수도 동일한 경우에는 배점이 높은 세부평가 항목의 점수가 높은 제안자를 낙찰자로 선정

6. 응모자격

가. 입찰참가자격 : 입찰공고서에 의함

(1) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서 제출 마감일 전일까지 실내건축공사업(업종코드:4990)으로 입찰참가자격을 등록한 자

(2) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서(“전시홍보관설치 및 디자인서비스”, 세부품명번호: 7215409902)를 소지한 자

* 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

* 계약체결 후 하청생산 납품, 다른 회사 완제품 구매 납품 등 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제11조의 ‘직접생산 확인 취소’ 사유에 해당하는 경우 계약 해제․해지 처리 및 ‘부정당업자 입찰참가자격 제한 처분'을 받을 수 있음

(3) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업자 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른   소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정(중소기업청고시)」에 따라 발급된 ‘중·소기업·소상공인 확인서’를 소지한 자

* 중·소기업·소상공인 확인서중소기업확인서는 전자입찰서 제출 마감일 전일(18시)까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

나. 공동수급에 관한 사항

(1) 본 사업은 공동수급(공동이행방식)을 허용함

(2) 공동수급체 구성원은 ｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣에 의한 계열사가 아니어야 함

(3) 공동수급체의 구성원은 본 입찰 외 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없고, 입찰서를 제출한 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없음

* 세부 사항은 “공동계약운용요령(기획재정부계약예규)” 참조

(4) 공동수급체를 구성 시 5개 업체 이내로 하고 공동이행계약의 경우 최소지분율은 10% 이상으로 함

(5) 공동수급협정서(별지 11호)를 제출하여야 함

7. 입찰일정

	제안일정 내용	기 간
1	조달청 계약요청 의뢰	2024. 3.
2	입찰공고 게시	입찰공고서 참조
3	제안서 및 입찰서 제출	입찰공고서 참조
4	제안서 평가회(PT발표)	제안서 제출 후 별도 유선 통지

※ 사업(현장)설명회 없음

※ 제안서 질의는 소정의 서면질의서(별지 10호)를 작성해 이메일(sunfkb8@korea.kr)로 제출

(기재 사항이 불확실하거나 공정한 입찰을 저해할 우려가 있는 경우 응답하지 않을 수 있음)

8. 제출서류

가. 정성제안서 1식 : 기술제안서(A3 10매)

* 자유양식으로 작성하되 설계설명서, 설계도, 예정공정표 등 포함

* ‘정성제안서’의 본문에는 업체명 또는 업체를 인식할 수 있는 내용 표기 금지. 동 사항을 위반해 평가위원회에서 불공정행위로 의결될 경우 감점 또는 실격 처리될 수 있음

나. 정량제안서 1식 : 입찰서류 (A4)

* 별지 1호∼9호 해당(공동계약의 경우, 별지 13호 또는 14호 제출)

* 제안서 등 제출서류는 ‘조달청 E-발주시스템’에 전자 제출

Ⅱ

제안지침

1. 기본지침

가. 기획 기본방향

(1) 국립청주박물관 소장품을 중심으로 기록물을 남긴 사람과 목적에 따라 소개하되 기록문화유산을 관람객이 흥미롭게 감상할 수 있도록 창의적으로 전시 연출

- 주제별 연출에 대한 독창적인 아이디어 제안

(2) 국내·외 순회전시를 고려한 전시품과 전시 보조물을 패키지화하여 전시 구성

(3) 유물, 영상, 조명, 음향, 체험물, 그래픽 등 다양한 매체를 활용해 전시 내용을 효과적으로 전달할 수 있는 전시 연출

(4) 전시시설물 설치 시 박물관 전시실의 기본구조가 훼손되지 않는 공법을 사용

(5) 유물 보존 및 관람 환경을 고려해 전시 자재는 포름알데히드가 거의 검출되지 않는 최상급 친환경 자재를 사용하며, EU기준 이상을 충족. 또한, 진열장 내부는 방염 및 방충처리된 소재 사용(방염 필증 등 증빙 자료 제출 필수)

(6) 전시 철거 시 원상복구를 하며 필요 시 전시실 도색 실시

(7) 관람객 전시 참여와 장애인 등 문화 취약계층을 포함한 모든 계층의 접근성 강화를 배려한 전시 구성

- 관람객 참여와 장애인 등을 배려한 사인물과 대체 전시품 아이디어 제안

나. 일반 지침

(1) 전시 목적과 제안 요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장 여건을 고려하여 계획

(2) 전시물은 관련 규정 및 제반 규정에 적법하게 제작 설치될 수 있도록 계획

(3) 국립박물관의 위상에 맞는 품위 있는 전시연출 계획 수립

(4) 공공 문화시설로서 내·외국인과 노약자 및 장애인의 편익과 안전성을 도모하는 계획 수립

(5) 청소년 단체관람객의 전시실 관람 시 안전성과 교육성이 고려된 계획 수립

(6) 조명 설치 등 전기 관련 작업 시 자격증을 보유한 전문가가 작업해야 하며 작업 부주의로 인한 화재 발생 시 모든 책임은 공사업체에 있음

* 계약자는 계약체결 이후「중대재해 처벌 등에 관한 법률 」제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하여야 하며, 입찰자는 현장여건, 과업내용 등을 미리 확인하여 이와 관련된 제반 비용을 입찰가격에 반영하여야 한다.

* 발주기관은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」제4조 제9호에 따라 계약자가 동 법 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하는지 평가·점검할 수 있으며, 계약자는 발주기관이 평가·점검을 실시하는 경우 이에 협조하여야 한다.

* 계약상대자가 안전·보건 확보에 필요한 조치를 소홀하거나, 이행여부에 대한 점검결과 보완 및 조치 등이 필요한 경우 발주기관은 계약상대자에게 이에 대한 시정을 요구할 수 있다.

(7) 전시 공사 기간에 발생하는 전기 사용 요금은 관에서 지출함

(8) 기존 각종 설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 하되, 사전에 발주기관과 의논하여 시공하며, 전시종료 시 원상 복구함

2. 세부지침

가. 전시 공간

(1) 공간구성

가) 전시장의 관람 동선은 관람을 원활하게 하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며 전시실 내부 관람객 휴게 공간을 고려하여 계획(전기배선 고려)

나) 전시 대주제 및 소주제에 따른 관련 유물을 참고하여 계획

(2) 전시 조명 설비

가) 전시물의 전체조명 및 집중 조명에 적합한 조명 배치와 조명기구 계획 및 설치

나) 신규 조명 설치 시에는 유물의 종류와 전시기법 등을 고려하여 적정한 시스템을 선택해야 하며, 연색성과 색온도 등을 계획 시 반영

(3) 그래픽, 색채구성

가) 전시연출에 따라 캐릭터 개발이 필요할 수도 있으며 영상, 이미지, 서체 등은 저작권이 확보된 것을 사용

나) 친환경 자재를 사용하며, 전반적인 색채구성이 상호 연계성과 차별성이 강조되면서 전체적인 조화를 이루도록 구성

나. 전시시설

(1) 일반사항

· 전시실 천장, 벽, 바닥, 파티션, 진열장 설치대 등의 마감 재료 및 디자인은 주위 시설 및 조명과의 조화, 유물의 안정적 거치 및 보존, 유지 관리의 용이성, 변질 방지 등이 최대한 보장되도록 설계되어야 하며, 수시로 채색과 보수 등 현상 변동을 필요로 하는 설계 지양

(2) 전시 공간연출

가) 전시실의 천장, 벽, 바닥, 홀 등의 마감 재료는 주위 시설 및 조명에 조화되고 전시물 보존에 적합한 품목을 선정하여 계획

나) 유물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시 자재는 친환경 자재를 사용

* 전시품의 안전을 고려하고 대여소장처의 환경기준을 적용하여 벽체 및 진열장 구조 및 재질이 고려되어야 함

* 노출전시 필요시 발주기관과 협의가 필요하고, 건축환경(벽체, 벽부장 등)을 고려하여 공간연출되어야 함(소형작품은 모두 진열장 전시 필수)

* 노출시 전시품과의 인제책 거리(1,000mm)를 고려, 보안 방안도 제안할 것

다) 진열장은 기존 진열장을 활용하되, 필요시 임시진열장을 제작하되, 진열장(의장, 시스템)은 보안, 안전, 밀폐성, 관리의 편리성 등을 최우선으로 고려하여 제작 설치. 진열장 및 전시실 파티션의 유리는 난반사를 최소화할 수 있는 재료를 선택하고 파손 시 비산되지 않도록 접합유리를 사용하거나, 비산방지필름(안전필름)을 부착하여야 함

* 소형작품들은 진열장에 전시되어야 하며, 독립형 전시가 가능한 신규 진열장을 제안할 것(진열장 개폐 및 조명계획 포함)

라) 진열장과 구조물은 전시품을 안전하게 보관하고, 시공과 관리가 용이하도록 제작 및 설치

마) 전시실 내 편의 시설(의자 등) 제안

(3) 전시보조자료(전시대, 받침대) 설치

가) 전시연출에 필요한 받침대, 전시대, 기타 전시 사인물 등은 전시품의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출

나) 유물 받침대, 패널, 설명카드, 배너 등은 유물의 안전성을 최우선으로 하고, 시각성 및 유지·관리의 용이성, 내구성 등을 보장하도록 재질 및 형태, 색채 등을 설계

다) 순회전시에 계속 사용할 수 있도록 전시품과 전시보조자료를 패키지화하여 디자인, 제작 설치

(4) 전시 보조물(체험/모형/포토존 등) 제작 및 설치

- 관람객의 이해도를 높이고 전시에 적극적으로 참여를 유도하기 위한체험 공간연출 제안

(5) 장애인 체험물 설치 협조

- 별도 발주 예정인 장애인 체험 연출 담당 업체와 협력하여 공간연출 실시

(6) 그래픽 및 홍보물 제작 및 설치

- 전시설계, 구획설정, 내용전달 등에 따라 스카시·시트커팅·일반인쇄 등으로 하며 제작 중 수정·변경 가능

(7) 전시보조 영상물 제작 설치

가) 전시보조 영상물은 전시를 보완하는 내용으로, 최신 기법을 통한 안정적이고 효과적인 설비와 구성이 되도록 계획(온오프 자동화 필수)

나) 영상물 설치: 영상 케이블, 전기 설비, 거치대, 영상 세팅 등 일체

* 전시보조 영상물 관련 H/W, S/W는 업체에서 구입 또는 대여. 필요 시 국립청주박물관 보유 빔 프로젝터, PC 등의 장비 사용 가능

다. 제안 유의사항

(1) 제안사는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공 도중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계산치 않음

(2) 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 따라 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재

(3) 시설물의 제작․설치 차후 부품교체, 하자보수, 전시장 철거 등 관리유지에 용이하도록 고려하여 제안

(4) 제안에 반영될 재료 및 특수 재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정 기준 이상의 우수재료를 선택

(5) 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고, 구성과 관련한 기초 자료는 입찰참가자가 조사 및 검토하여야 한다.

* 별첨자료: 전시 기본계획서 / 전시 대상 유물목록 / 특별전시실 평면도

3. 제안서 작성 요령

가. 제안서의 작성 지침

(1) 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 함

(2) 제출된 제안서의 내용은 조달청에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시의 계약 조건의 일부로 간주함

나. 제안서 작성요령

(1) 제안서 평가의 공정성과 투명성을 제고하기 위해 기술제안서와 발표용 자료에는 업체인식 표기를 제한하며, 이를 위반해 평가위원회에서 불공정행위로 의결될 경우 실격처리 될 수 있음

(2) 응모서류는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성

(3) 설계설명서, 관리운영계획서, 설계도, 예정공정표를 포함

4. 유의사항

가. 제안서 제출 방법은 입찰공고문 참조(나라장터)

나. 제출된 제안서는 일절 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

다. 입찰참가자는 제출된 제안서류에 대한 사실 여부 등의 책임을 짐

라. 본 사업과 관련된 이의 및 이견이 있으면 제안자와 발주기관이 상호 협의하여 결정함

마. 본 사업은 발주기관의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우에 제안자와 발주처가 상호 협의하여 결정함

바. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

사. 제안서의 모든 내용은 지적재산권 관련 사항을 주의해서 작성해야 하며, 지적재산권 관련 문제 발생 시에는 입찰자가 책임을 짐

아. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 사업수행이 불가능한 것으로 평가함

자. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 함

차. 용역 결과에 따른 산출물의 소유권은 국립청주박물관에 있음

5. 착수 및 완료(결과보고)

가. 전시설계 및 제작은 계약일로부터 10일 이내에 착수해야 함

나. 설계보완은 발주기관의 최종승인을 받아야 함

다. 발주기관의 지시에 따라 검토를 마친 뒤 제작·인쇄하고 세부지침서에 따른 결과물을 제출해야 함

라. 결과물은 계약만료일까지 발주기관에 제출하여 소정의 검수 절차를 거쳐야 함

마. 발주기관이 결과물에 대해 수정․보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후라도 제안사 부담으로 성실히 수정․보완하여 제출해야 함

바. 결과보고 상세내용

(1) 설계도서 3부

(2) 설명패널, 그래픽 원본 파일

(3) 홍보물 디자인 원본 파일

(4) 내역서 2부

(5) 기타 본 전시물 제작과 관련한 내용(과업 진행 시 사진 포함)

(6) 위 내용을 수록한 저장매체

6. 제안서 세부내용

구 분	내 용	매 수	비고
기술 제안서	전시 콘셉트 2. 전시 평면 3. 주제별 세부 연출 4. 전시연출 상세(유물연출, 마감재, 색채, 조명계획 등) 5.. 설계에 따른 공정 및 운영관리 * 위 내용이 포함되도록 10매 이내로 구성	총 10매 이내 (지정크기 A3)	흑백 ․ 칼라

Ⅲ

제안서 평가

1. 제안서의 평가

가. 평가 일정 및 방법

(1) 평가 일정: 제안서 접수 후, 참여업체 PT 평가 실시

(2) 평가기관: 기술능력평가 및 사업수행능력평가(국립청주박물관)

나. 평가위원회 구성

(1) 제안서의 공정한 기술능력평가를 위해 박물관 내․외부의 전문가로 평가위원회를 구성

(2) 평가위원회 위원은 국립청주박물관에서 7인 이내의 관련분야 전문가로 선정

(3) 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하여 종합평가순위를 결정

(4) 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 공개하지 아니함

다. 평가방법

(1) 소정의 기한 내에 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 평가

(2) 평가 총점은 100점을 만점으로 하되, 기술능력평가 90점, 입찰가격평가 10점의 배점으로 평가

(3) 기술능력평가는 업체에 대한 심사위원 점수의 최고점, 최저점을 제외한 총계점수를 산술 평균하되, 최고 또는 최저점수가 둘 이상인 경우 하나만 제외

(4) 평가점수에 소수점 이하가 포함될 경우, 산술평균의 값은 소수점 셋째 자리에서 반올림

(5) 협상적격자 선정은 기술능력평가 결과 고득점자순으로 함. 다만, 기술능력평가 점수가 배점한도의 85%(76.5점) 미만인 자는 협상대상에서 제외

* 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰

(6) 사업수행능력 평가는 객관적 지표에 의한 평가로서 정해진 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정

다. 평가결과 발표

(1) 평가위원회는 심사내용을 기록한 보고서를 작성하여 평가위원 모두가 서명하고, 발주기관에서는 그 결과를 조달청에 제출

(2) 조달청은 제안서 평가점수와 업체평가 점수 및 입찰가격을 종합평가 하여 협상적격자를 선정한 후 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 개찰 현황을 공고

라. 기타

(1) 제안서 심사 결과 및 세부 내용에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 응모자는 평가위원 구성, 평가 기준, 평가 방법에 대해 이의를 제기할 수 없음

(2) 당선작품 발표 후 제안 도서는 주최자가 임의 파기함

2. 평가항목 및 평가기준

가. 기술능력평가 평가항목 및 배점 기준(90점)

구분	평가항목	세부평가항목	배점
정성평가 (80)	사업 이해도	․ 사업목적과 내용의 이해도	10	15
		․ 공고 규격 또는 기술과의 적합성	5
	기획 및 연출방법	․ 전시연출 콘셉트의 창의성과 적정성	10	20
		․ 주제별 공간구성 및 디자인의 참신성과 적정성	10
	세부연출 계획	․ 전시 연출 요소의 적정성과 독창성 ․ 조명연출 계획 및 적정성	10	30
		․ 공간 조성 및 연출 매체와 기법의 기술성 및 구현 가능성 ․ 마감재, 조명, 색채 구성의 적정성	10
		․ 그래픽 연출 디자인 및 디지털 콘텐츠의 창의성과 적정성	10
	관리 및 운영계획, 안전‧재난관리	․ 관리 및 운영계획의 적정성 ․ 사후관리 및 운영의 안정성 및 편의성	10	15
		․ 안전관리, 재난관리 등 비상대책 수립	5
정량평가 (10)	기술 능력	․ 관련 기술 전문인력 확보	3	10
	수행실적	․ 최근 3년간 관련분야 실적	3
	경영상태	․ 기업 신용도 평가등급	4
합계				90

나. 정량평가 평가 기준

(1) 전문인력 보유현황(3점)

평가 항목	평가 요소	배점	평가방법		비 고
			기준	평점
참여기술자	등급 및 인원	3	A. 특급기술자 B. 고급기술자 C. 중급기술자 D. 초급기술자	각 0.5점 각 0.4점 각 0.3점 각 0.2점	※ 평점=인원×기술자별 점수 ※ 최고 배점 3점을 초과할 수 없음 ※ 국립청주박물관 심사

※ 기술자에 대한 등급은 산업통상자원부 고시 “엔지니어링산업 진흥법 시행령”의 <별표 2>의 기술자 등급 및 자격기준에 의하며 산업디자인 분야에 대해서만 평가

※ 공고일 기준 2개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당

※ 재직증명서, 공인기관자격증(해당자), 최종학교졸업증명서, 국민연금관리공단 확인서 첨부

※ 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율) …

(2) 수행실적(3점)

평가 항목	평가요소	배점	평가방법		비고
			기준	평점
수행 실적	해당 사업규모대비 유사용역 및 시공실적(금액기준)	3	A. 100%이상 B. 70%이상~100%미만 C. 40%이상~70%미만 D. 40%미만	3.0 2.7 2.4 2.1	○ 실적인정범위 - 공공 및 민간 실적(박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 전시관 등)의 전시연출 유사용역 및 시공실적 ○ 공고일 기준 3년 이내 실적 합산 - 단일 4천만원(부가세 포함) 이상 사업에 한함

※ 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별표9] 수행실적 평가기준(제9조 제3항 제2호 관련) 따름

※ 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용

단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

※ 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율) …

(3) 경영상태(4점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	4.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	3.8
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3.6
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2.8

※ 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

[주]

1. ｢신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률｣ 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가 등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다).

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

다. 입찰가격 평가(조달청 평가) : 10점

구분	주요 평가기준	배점	비고
입찰가격	“입찰산식에 의함”	10

3. 계약체결

가. 낙찰자가 선정되면 10일 이내에 계약을 체결하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 동법 물품구매제조계약 일반조건, 특수조건 등 일반원칙에 따름

나. 제안자의 실격․선정무효

(1) 익명성 유지의 원칙 위배 등 제안자가 공정한 심사를 하는 데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 한 경우(정성제안서에 업체명 또는 작성자명, 이를 인지할 수 있는 표기 등)

(2) 제출된 서류에 중대한 허위사실이 발견된 경우

(3) 제안 업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 여건 변화로 필요한 법적 요건이 미비하게 된 경우

다. 기타

(1) 상기 기술한 내용 외에 평가 진행사항은 공개하지 아니함

(2) 발주기관은 평가 결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 제안업체는 국가계약법 제28조(이의신청) 및 국가계약법 시행령 제110조(이의신청을 할 수 있는 정보 조달 계약의 최소 금액 기준 등)에 따라 심사결과에 대해 이의신청이 가능함

(3) 실적증명은 발급 후 1년 이내 것만 유효(입찰공고일 기준)

(4) 모든 증빙자료는 발행 자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함

(5) 협상대상자의 저작권, 지적재산권, 기타 법적 소유권 등 모든 권리는 상호 공동 소유하며, 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 제안자가 모든 법적 책임을 짐

(6) 협상이 성립되었으나 계약을 포기할 경우 제안서의 내용에 대하여 연고권 등 일체의 권리를 주장할 수 없음

(7) 협상대상자는 발주기관과 협의하여 수정, 보완 또는 추가 조정하며 필요한 경우 발주기관의 의견을 반영하여야 함

(8) 협상 방법 등 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」및 「협상에 의한 계약 체결기준」(기획재정부 계약예규), 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부 기준을 준용

(9) 본 지침의 해석상 이견이 있을 때에는 계약상대자간 상호 협의에 의하여 해결하며, 합의가 불가능할 경우 <기획재정부(계약예규)「물품구매(제조)계약일반조건」제31조(분쟁의 해결)>에 따라 해결함

(10)「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제정·시행에 따른 준수사항 안내

- 계약자는 계약체결 이후 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 」 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하여야 하며, 입찰자는 현장여건, 과업내용 등을 미리 확인하여 이와 관련된 제반비용을 입찰가격에 반영하여야 함

- 수요기관은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조 제9호에 따라 계약자가 동법 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하는지 평가·점검할 수 있고, 계약자에게 안전교육 및 기술지도 실시에 대한 결과보고를 요청할 수 있으며, 계약자는 수요기관이 평가·점검을 실시하는 경우 이에 협조하여야 함

- 계약상대자가 안전·보건 확보에 필요한 조치를 소홀히 하거나, 이행여부에 대한 점검 결과 보완 및 조치 등이 필요한 경우 수요기관은 계약상대자에게 이에 대한 시정을 요구할 수 있음

[별지 1호]

국립청주박물관 특별전 <기록(가제)> 전시연출 용역을 위한 제안서 응모 신청서
접 수 번 호		2024 -
접 수 일 자		2024년 월 일
제 출 자 (대 표 사)	업 체 명
	대 표 자
	주 소
	전 화	TEL : FAX :
국립청주박물관에서 시행하는 2024년 특별전 「<기록(가제)> 전시연출 용역」 제안에 필요한 서류를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 : 국립청주박물관장 귀하

[별지 2호]

사업수행능력 자기평가표

▣ 기술능력 객관적 지표 평가 자체 평점

항 목	세 부 항 목				배 점	평 점	비 고
전문인력 보유현황	특급기술자				각0.5점
	고급기술자				각0.4점
	중급기술자				각0.3점
	초급기술자				각0.2점
	상 한 점 수				3점
사업수행실적	누계 실적	100% 이상			3.0점
		70% 이상～100% 미만			2.7점
		40% 이상～70% 미만			2.4점
		40% 미만			2.1점
		상 한 점 수			3점
경영상태	회사채		기업어음	기업신용 평가등급	-	-	-
	AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0		A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	4.0점
	BBB-, BB+, BB0, BB-		A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	3.8점
	B+, B0, B-		B-	B+, B0, B-	3.6점
	CCC+ 이하		C 이하	CCC+ 이하	2.8점
	상 한 점 수				4점
합 계					10점

[별지 3호]

제안사의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

[별지 4호]

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축 기 술 자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○○
기타

주) 1. 기술자의 구분은 산업동상자원부 「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 <별표 2>의 기술자 등급 및 자격기준에 따르며, 공고일 기준 2개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학력증명서, 국민연금관리공단 확인서 첨부

※ 자격증 사본을 증빙자료로 제출하며, 유효기간이 지난 자격은 인정하지 않음

[별지 5호]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립청주박물관
	증명서용도		국립청주박물관 2024년 특별전 <기록(가제)> 전시연출 용역 실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

[별지 6호]

사업수행 실적 집계표

구 분	공 사 명		공 사 기 간	준공금액	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
①최대실적 (1건)
	소 계
②기타 실적
	소 계
합 계 (①+②)

주) 최근 3년간(공고일 기준) 홍보관, 전시관, 과학관, 체험관 등의 전시물을 제작․설치한 실적

[별지 7호]

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등기부등본 (주민등록번호)
사업자 등록번호
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 아래와 같이 통보합니다.

교부일  2024.   .   .

신용평가기관 :                           인

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

[별지 8호]

행 정 처 분 내 용

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

[별지 9호]

서     약     서

국립청주박물관에서 추진 중인 「2024년 특별전 <기록(가제)> 전시연출 용역」 입찰에 참여한 당사는 국립청주박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반 규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수할 것이며, 입찰과 관련한 입찰서 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2024년     월      일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립청주박물관장 귀하

[별지 10호]

서 면 질 의 서

발송일시	년 월 일
제 안 서 접수번호		연락처	전화 : fax :
업 체 명	(대표: )
제안서 쪽수
질의내용	※ 제안지침서를 다시 한번 숙지하시어 질문하여 주시길 바랍니다. ※ 명료하게 작성해 주시길 바랍니다.

[별지 11호]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 : 금액은 기재하지 않음

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :   )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

[본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년   월   일

국립청주박물관장 귀하