2012 주요업무 추진계획

2011. 12.

대한민국역사박물관건립추진단

목   차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 그 간의 주요 정책성과	3

Ⅲ. 2012년 정책목표 및 중점추진 과제	5

Ⅳ. 2012년 주요업무 추진계획	6

1. 건립 및 전시공사 차질없는 마무리	6

2. 새 박물관 운영기반 구축 및 성공적 개관	7

【별 첨】건립개요, 건립일정, 조감도, 전시체계

I

일반현황

1. 주요임무

□ 건립계획의 수립에 관한 사항

□ 건축 및 전시 설계ㆍ공사ㆍ감리

□ 전시 관련 자료의 조사ㆍ기획ㆍ수집 및 교육 프로그램의 개발

□ 위원회의 구성 및 운영ㆍ지원

□ 건립사업 홍보 및 건립에 관한 사항

2. 조직 및 인원

□ 조 직 : 1단 3과(문화부 한시 : ‘09.5.4～’12.5.3 / 3년)

			추진단장
기 획 과(5명)			건 립 과(5명)			전시자료과 (7명)

□ 정 원 : 18명(전문계약직 2명 별도)

구분	계	계약직 (전문)	4급	5급	6급	7급	연구관	연구사	기능직
기획과	6	1(단장)	1	1	1	1	-	-	1
건립과	5	-	1	1	3	-	-	-	-
전시자료과	7	-	-	-	-	-	2	5	-
계	18	1	2	2	4	1	2	5	1

* 전문계약직(2명 : 소장품수집관리 1, 근현대사 1) 미포함

※ 대한민국역사박물관건립위원회 (‘09.4.16)

□ 근거 : 대한민국역사박물관건립위원회 규정(‘09. 2. 11 제정/대통령령)

□ 소속 및 위원 구성 : 국무총리 소속 총 29명으로 구성(위원장 김진현)

* 민간 위촉위원 19명, 정부 당연직위원 10명

□ 위원회 임무 : 건립사업 관련 중요사항 심의

3. 재정현황

(단위 : 백만원)

구분	2011예산 (A)	2012예산 안(B)	증감 (B-A)		비고
				%
합 계	29,574	21,771	△7,803	△26.4
□ 시설건립	25,600	10,100	△15,500	△60.5
ㅇ건축공사	18,555	6,162	△12,393	△66.8
ㅇ전시공사	5,623	3,665	△1,958	△34.8
ㅇ감리비	1,366	248	△1,118	△81.8
ㅇ시설부대비	56	25	△31	△55.4
□ 시설관리유지	-	1,215	1,215	순증
ㅇ시설관리 운영인력	-	586	586	순증
ㅇ시설관리유지비	-	629	629	순증
□ 운영기반구축	3,048	9,513	6,465	212.1
ㅇ전시 및 자료수집	2,798	5,638	2,840	101.5
ㅇ근현대사연구	-	2,500	2,500	순증
ㅇ종합정보서비스	-	1,000	1,000	순증
ㅇ국민참여홍보	250	375	125	50.0
□ 추진체계 운영	926	943	17	1.8
ㅇ건립위원회	280	238	△42	△15.0
ㅇ추진단 및 박물관	646	705	59	9.1

Ⅱ

그 간의 주요 정책성과

□ 리모델링 건축, 친환경 에너지 절감기술을 활용한 건립공사 추진

	건립공사 개요
◈ 공사기간 : ‘10.11.1～’12.5.23 / 위치 : 옛 문화부 청사(리모델링) ◈ 시설규모 : 대지 6,445㎡, 건축연면적 10,734㎡(지상7층+옥탑) ◈ 공사비 : 31,905백만원 ◈ 시공사 : 대림산업 컨소시엄(대림산업+한화건설+정림건축)

ㅇ 건립 시공사 및 책임감리 용역사 선정(‘10.10.29)

ㅇ 건립공사 착공식(‘10.11.25/국무총리 등 400명)

ㅇ 건립공사 대국민 업무보고(‘11.2.25, 국립민속박물관 볕들재)

※ ‘11.12월 현재 공정률 : 69%

□ 아날로그적 감성과 첨단 디지털이 융합된 전시설계 및 공사 추진

	전시공사 개요
◈ 사업기간 : ‘10.12.1～’13.1.19 * 전시설계 완료(‘11.7월) ◈ 사업규모 : 상설전시 3,086㎡(934평) / 공사비 : 9,550백만원 ◈ 시공사 : 시공테크 컨소시엄(시공테크+비엠비+삼덕공사)

ㅇ 전시주제 선정(‘10.5월, 4개 대주제․13개 중주제․키워드 43개)

ㅇ 전시(전시물 설계 및 제작․설치) 사업자 선정(‘10.12.1)

ㅇ 전시기본설계(‘11.4.7) 및 실시설계 확정(’11.6.16)

ㅇ 전시설계 완료(’11.7.15) 및 전시설계안 대통령 보고(‘11.7.18)

ㅇ 전시인테리어 및 전시물 제작(’11.9～’12.5월)

□ 국가발전의 역사성과 상징성을 대표하는 다양한 전시자료 수집

	자료수집 목표
◈ 수집기간 : 2010～2012(1단계) ◈ 목표량 : 30,000점(구입 22,000점, 기증 8,000점) ◈ 소요예산 : 45억(‘10년 8억, ’11년 23억, ‘12년 14억)

ㅇ 자료 확보 25,567점(‘10년~’11.10.31 / 구입 19,723, 기증 5,844 )

ㅇ 국방부 등 27개 정부기관 소장자료 목록 확보(9,594점)

ㅇ 국가원로 등 주요인사 소장자료 기증 추진(4,600여점)

□ 박물관 전시 운영체계 기반구축을 위한 사전 조사 및 연구

ㅇ 대한민국 근대화 과정 기초자료 수집 및 DB 구축(1～10월)

ㅇ 디지털아카이브 구축 및 유비쿼터스 기반 박물서비스 기본계획 연구(1~6월)

ㅇ 대한민국역사박물관 조직 및 인력운영 방안 연구(2～5월)

ㅇ 대한민국역사박물관 운영기반 구축 및 발전방안연구(8～12월)

ㅇ 대한민국역사박물관 전시주제 해설 기초 자료연구(9～12월)

ㅇ 한국근현대사 연구 활성화 방안 연구(11～12월)

□ 국민적 공감대 및 인지도 제고를 위한 범국민 홍보활동 추진

ㅇ 주요 계기별 전략적 홍보 추진(건립사업 및 기증참여)

- ‘고향가는 길’ 광고(설․추석, 30만부), 반상회 활용 홍보(3.1절), 라디오 캠페인(현충일), 지하철 광고(광복절 계기) 등

ㅇ 범국민적 기증참여 활성화 등 주요홍보 추진

- 파워카페 제휴 온라인이벤트(6~7월), 재외교민 대상 건립사업 및 자료기증 참여 홍보(7~8월), 위원장 및 건립위원 신문매체 기고 및 인터뷰(5회), 전광판(7개소) 및 편의점내(500여대) 디지털 영상광고(10~11월), 자료기증 등 기획기사(포커스 4회, 메트로 1회) 등

Ⅲ

2012년 정책목표 및 중점추진 과제

□ 목 표

대한민국역사박물관의 성공적 개관

(위대한 국민 ! 더 큰 대한민국 !)

<과거와 현재를 통해 미래와 세계를 여는 박물관>

□ 중점추진 과제

◈ 건립 및 전시공사 완료

◈ 새 박물관 운영기반 구축 및 성공적 개관

◈ 객관적이고 공정한 근현대사 연구 기반 조성

Ⅳ

2012년 주요업무 추진계획

1. 건립 및 전시공사 완료

□ 건립공사 완공 및 시설물 안정화, 관람환경 조성

ㅇ 건립공사 완료(5.23) 및 준공검사 완료(6.1)

ㅇ 시설물 시운전 및 개관준비(6～12월)

ㅇ 시공사(대림산업)로부터 시설 인수 및 유지 관리(6.1~)

ㅇ 방재․기계․전기․통신 등 첨단시설 관리 인력 배치(23명, 6월)

ㅇ 미화․위생․경비 등 쾌적한 관람환경 유지 인력 배치(23명, 6월)

ㅇ 안전검사(전기, 소방, 가스 등) 및 시설물 부분 보완

□ 전시공사 완공 및 상설전시실 설치

ㅇ 전시인테리어 및 전시물 제작(’11.9～’12.5월)

ㅇ 사인 및 전시물 현장 설치(6～11월)

ㅇ 전시물 시운전 및 개관준비(11～12월)

□ 첨단 IT․CT 기술 활용, 기획전시실 설치

ㅇ 기획전시 Ⅰ실 : 120㎡(본관 1층 중앙홀 로비 일부)

ㅇ 기획전시 Ⅱ실(디스커버리센터) : 119㎡(본관 1층 강의실)

ㅇ 추진일정

- 기획콘텐츠 개발 및 발주 준비(‘11.12～’12.2월)

- 업체선정, 전시 및 체험공간 시나리오 작성(‘12.1～3월)

- 전시와 체험학습용 콘텐츠 제작 및 CG작업(‘12.4～8월)

- 전시실 및 체험학습실 공사(‘12.5～9월)

- 시범운영 및 개관(’12.10~12월)

2. 새 박물관 운영기반 구축 및 성공적 개관

가. 성공적인 개관을 위한 전시운영 준비

□ 대한민국역사박물관 전시물 설계 및 제작․설치(1~12월)

ㅇ 전시시설물, 전시 및 전시정보 영상, 전시연출조명, 통합시스템 등

□ 전시도록(국․영문) 및 전시가이드북(6개 국어)* 제작(3~12월)

* 내․외국인 관람 편의를 위해 한국어, 영어, 일어, 중국어, 불어, 스페인어 제작

□ 전시콘텐츠 조사 및 수집(1~12월)

ㅇ 주요 전시물 대여 및 복제, 사진 및 동영상 자료 구입, 해외 선진박물관 전시기법 및 관람 편의시설 사례조사 등

나. 다양한 전시자료 확보

□ 종합적․체계적 전시자료 확보(연간, 6,500점 목표)

ㅇ 역사적 사건 및 의미를 부각시킬 수 있는 대표적 실물 자료 확보

ㅇ 구입자료는 전시대상으로 선정된 목록을 중심으로 우선확보 추진

ㅇ 기증자료는 국민 삶의 애환이 담긴 자료 및 이야기 수집에 중점

* ‘11.12.20현재, 25,567점(구입 19,723점, 기증 5,844점) 확보

□ 정부부처 소장자료 중 전시대상자료 선정, 전시 자료 보완(’11.12~’12.8월)

ㅇ 총 9,594점 중 전시대상 자료 274점 선정, 대여․이관 추진

ㅇ 현대사 관련 중요자료 유관 기관․단체 대상, 자료조사 및 수집

□ 범국민 기증참여 캠페인 등 기증활성화 추진(연중)

ㅇ 건립사업 대국민 홍보활동과 연계, 대국민 공감대 확산 및 참여 유도

ㅇ 기증자료 전시, 기증자 주요 행사 초청, 기증자료 복제품 제공 등

다. 객관적이고 공정한 근현대사 연구 기반 조성

□ 대한민국역사박물관 연구기능 강화를 위한 비전

	◈ 대한민국역사박물관, 올바른 근현대사 정립을 위한 허브화 ◈
ㆍ학계, 유관기관 및 관련 박물관과의 협력을 위한 근현대사 연구의 허브기관 ㆍ전시, 교육, 조사연구, 자료의 수집을 위한 공정하고 객관적인 근현대사연구 전문기관 역할 수행

□ 주요사업

ㅇ 세계 현대사박물관 실태조사연구

ㅇ 대한민국 근현대사 사적지 조사연구를 위한 중장기 계획 수립 연구

ㅇ 소장자료로 본 근현대사 자료집 발간(분야별 조사연구 추진)

ㅇ 학술심포지엄 개최 및 학술지 발간

ㅇ 대중을 위한 대한민국사 국ㆍ영문판 발간 및 재외동포를 위한 교재 발간

ㅇ 교육프로그램, 역사현장탐방, 전시관 학습 자료집 제작 및 교육진행

라. 새 박물관 정보서비스 기반 구축

□ 디지털 아카이브 구축 및 이용자 편의성 확대

ㅇ 자료(문서, 영상, 음향 등)의 디지털 아카이빙 및 전산시스템 구축

ㅇ 국제표준(HTML5) 기반 DB구축으로 이용자 맞춤형 정보 제공

* 이용자․특성․분야별 정보제공 시스템 특화(교육, 연구, 창작산업, 해외홍보 등)

□ 사이버박물관 구축

ㅇ 전시 및 정보를 온라인상에서 접하고 체험하는 사이버박물관 구축(박물관 홈페이지 구축과 연계)

ㅇ 자유로운 전시실 이동, 원하는 자료를 입체적으로 관람할 수 있는 3D 가상체험 시스템 구축

□ 스마트 박물관(s-museum) 정보서비스 시스템 구축 등

ㅇ 디지털아카이브와의 연동을 통해 필요한 디지털 자료를 다양한 전시매체에 자동 적용시킬 수 있는 시스템 구축

ㅇ 모바일 등 첨단 정보단말기를 이용한 개인별 최적화된 전시동선 유도(뮤지움 네비게이터) 및 안내 콘텐츠 등 스마트 전시환경 제공

마. 새 박물관 조직 및 인력 운영체계 구축

□ 조직 및 인력 증원(행안부․기재부 협의 완료)

ㅇ 조직 :  3과(추진단) ⇒  5과(박물관) / 2과 증설

ㅇ 인원 : 18명(추진단) ⇒ 45명(박물관) / 27명 증원

□ 조직 및 인원구성(안)

ㅇ 조직구성 및 인력배치

								관 장
기획운영과 (11)				전시운영과 (9)					자료관리과 (9)					교육홍보 협력과(9)				근현대사 연구과(7)

* 고위공무원(계약직, 관장) : 1명, 4급 : 3명, 5급 : 6명, 6～7급 : 9명, 학예연구관 : 10명, 학예연구사 : 11명, 기능직 : 5명 등 총 45명

ㅇ 주요기능

- 행정지원 및 시설관리 기능(기획운영과)

- 전시기획 및 디자인, 기획 및 상설전시 운영(전시운영과)

- 자료수집․관리 및 보존처리, 디지털정보 기능(자료관리과)

- 교육․홍보, 교류협력 및 고객서비스 기능(교육홍보협력과)

- 근현대사 조사연구 및 아카데미 운영(근현대사연구과)

□ 추진일정

ㅇ 직제관계 규정 개정(‘12.1～4월) : 추진단 기간연장, 소요정원 증원

ㅇ 직제관계 규정 개정 및 대한민국역사박물관 발족(‘12.9.1)

ㅇ 관장요원 및 직원 선발 및 배치(’12.4~8월, 9월)

바. 건립사업 범국민 참여홍보

□ 단계별 홍보로드맵

홍보기반 구축 단계(1단계)	⇨	공감대 확산 단계(2단계)	⇨	개관 홍보 단계(3단계)

<공사준비(～‘10.10월)>      <건립공사(‘10.11～‘12.5월)>     <완공․개관(‘12.6～‘12.12월)>

□ 국민 감성을 움직이는 홍보물 제작․활용(3~7월)

ㅇ 건립홍보와 기증참여를 유도할 수 있는 리플릿(2만부) 등 인쇄물 제작

ㅇ 개관 계기, 박물관의 구체적 실체를 소개하는 영상물(3분․20초) 제작

□ 박물관 가치와 비전을 소개하는 효과적 대언론 홍보(1~12월)

ㅇ 건립위원․국내외 주요인사, 언론매체 기고․컬럼․인터뷰 지속 추진

ㅇ 정기․수시 언론 모니터링 및 주요 홍보 이슈 관련 보도자료 배포

ㅇ 대중매체로서 인지도를 가진 무가지 활용, 기획기사 및 광고

□ 인터넷을 통해 국민 모두가 쉽게 참여할 수 있는 온라인홍보 추진(1~12월)

ㅇ 국민과의 커뮤니케이션 기능을 강화하는 방향으로 홈페이지 리뉴얼

ㅇ 기증캠페인 홍보사이트 구축, 개관기념 온라인 이벤트 추진

□ 국민적 공감대 확산 및 인지도 제고를 위한 매체홍보(3~10월)

ㅇ K-TV, 정부 정책포털, 전광판 무료광고 등 공공매체 활용 홍보

ㅇ 지하철, 시내버스, KTX 등 대중 운송매체를 활용, 광고 추진

□ ‘국민과 함께 만들어가는 박물관’ 실현을 위한 국민 참여형 기획행사

ㅇ 방송 및 언론 홍보와 연계, 기증품 전시 및 접수 행사, 공모전 등

□ 정부기관 및 유관단체 등 범국가차원 협력 홍보 추진

ㅇ 우리부 소속․산하 다중이용 문화시설․기관과의 연계홍보

ㅇ 주요 기념일 계기 행안부, 국방부, 보훈처 등 관계부처와 협력홍보

참고 1	대한민국역사박물관 건립개요

□ 추진배경

	배 경
《제63주년 광복절 및 건국 60년 기념 8․15 대통령 경축사》 : 2008.8.15 “고난과 역경 속에서 발전한 자랑스러운 기적의 역사를 기록하고 후세에 전승하며, 국민의 자긍심 고양 및 국민통합으로 국가 미래발전의 원동력을 확보하기 위하여 ‘대한민국역사박물관’ 건립”

□ 추진경과

ㅇ 대통령, ‘현대사박물관’ 건립 공표('08.8.15)

ㅇ 건립위원회 규정 제정(‘09.2.11) 및 출범(’09.4.16)

ㅇ 건립추진단 발족(‘09.5.4, 2과 12명)

ㅇ 건립기본계획 대통령 보고 및 발표(‘10.3.12)

ㅇ 건립공사 착공식(‘10.11.25)

ㅇ 대통령, 전 부처에 전시자료 수집 협조 지시(‘11.1.18, 국무회의시)

ㅇ 대국민 업무보고(‘11.2.25, 국립민속박물관 볕들재)

ㅇ 전시설계안 대통령 보고(‘11.7.18, BH본관 소회의실)

□ 건립개요

건립기간 : 2010년 ～ 2012년( * ‘12. 12월 개관목표)

건립규모 : 부지면적 6,445㎡(1,950평), 건축연면적 10,734㎡(3,247평)

* 전시실 3,086㎡, 수장고 433㎡, 교육시설 512㎡ 등

건립형태 : 옛 문화부 청사 본관 리모델링 + 별관부지 일부 증축

주요시설 : 전시․수장․교육․연구․사무․부대시설 등

총사업비 : 448억원

전시방향

- 개항이후(1876년), 대한민국의 역동적 발전역사를 객관적․균형적으로 조명

* 상징물 및 디지털기술 활용 전시(IT․CT 융합한 미래형 문화공간)

참고 2	대한민국역사박물관 건립일정

단계	일정	기본계획	건축			전시
			설계	공사		설계	공사
계획 단계	‘09. 8	건립기본계획수립 (‘09.8～’10.1월)
	9
	10
	11
	12
설계 단계	‘10. 1
	2		아이디어공모 (‘10.2～4월)
	3
	4
	5		입찰 안내서 작성(‘10.5～6월)
	6
	7		턴키공고(7월)
	8		기본설계 (‘10.8～10월)
	9
	10		업체선정(‘10.10월)	청사이전(‘10.10월)
	11		실시설계 (‘10.11～’11.2)	착공(‘10.11.25)		업체선정(‘10.11월)
	12			본관 리모 델링 구조 보강 (‘10.11～ ’11.7월)	별관 철거 및 기초 골조 (‘10.11～ ’11.7월)	기본설계 (‘10.11～’11.3월)
공사 단계	‘11. 1
	2
	3		설계심의(3월)
	4					실시설계 (‘11.4～7월)
	5
	6
	7
	8			건축공사 (‘11.8～’12.5월)			전시 공사 및 전시 설치 (‘11.8～ ’12.11월)	전시인테리어 및 전시물제작 (‘11.8～ ’12.5월)
	9
	10
	11
	12
	‘12. 1
	2
	3
	4
	5
개관 준비	6			시운전 및 개관준비 (‘12.6～11월)				사인및 전시물설치 (‘12.6～ 11월)
	7
	8
	9
	10
	11							시운전
개관	‘12.12	대한민국역사박물관 개관(‘12.11월말)

참고 3	대한민국역사박물관 조감도

정면 모습

후면 모습

참고 4	전시체계 및 컨텐츠 구성안

□ 전시체계 및 구성(4개 대주제와 13개 중주제)

구 분	전시체계		주요 연출방향
	대주제	중주제
상징조형물 (1층 로비)	Dynamic Korea		태극기의 건곤감리를 모티브로 역동적인 대한민국의 성장데이터를 LED로 연출
프롤로그 (3층)	Spirit Korea		한반도의 심장 소리와 대한민국의 상징, 태극기
제1실 (3층)	대한민국의 태동	자주적 근대국가의 꿈과 좌절	자주적 근대국가의 꿈과 노력, 그리고 국권회복을 위해 희생한 선열들의 숭고한 정신을 통해 역사의 혼을 인식
		대한민국 임시정부와 독립운동
		1945년 8․15 광복
제2실 (4층)	대한민국의 기초확립	대한민국 정부수립	정부수립의 의미와 6.25전쟁의 폐허 속에서도 희망을 갖고 근대국가의 토대를 구축한 불굴의 국민정신을 고양
		6․25전쟁과 전후 복구
		근대국가 토대 구축
제3실 (5층)	대한민국의 성장과 발전	경제개발과 산업화	절대적 빈곤 속에서도 경제성장과 민주주의를 함께 이룩한 국민의 헌신과 노력을 부각
		변모하는 도시와 농촌
		시민사회의 성장과 민주의식
제4실 (5층)	대한민국의 선진화, 세계로의 도약	민주화 시대의 개막	국가발전의 성취와 번영의 역사를 지속하고 더 큰 대한민국으로 도약하기 위한 국민자긍심 고양과 국민통합을 실현
		세계로 나가는 대한민국
		경제선진국을 향하여
		대한민국의 미래
에필로그 (3층)	Global Korea 대~한민국		세계 각국의 언어로 보는 ‘대한민국’ 타이포그래피, 대한민국의 미래에 대한 국민의 소망을 담는 공간

□ 전시콘텐츠 구성

대주제	중주제	소주제	히스토리캡슐	유물	사진	영상		키오스크 (정보영상)
						시나리오	편집
대한민국의 태동(1실)	3	11	2	180	222	6	5	1
대한민국의 기초확립(2실)	3	10	2	360	250	8	2	-
대한민국의 성장과 발전(3실)	3	11	-	430	594	18	9	3
대한민국 선진화, 세계로의 도약(4실)	3	8	-	100	387	8	7	10
계	12	40	4	1,070	1,453	40	23	14