과 업 지 시 서

용 역 명	「국립아시아문화전당 라이브러리파크 공간개선 실시설계」용역
발주기관	아시아문화원

2020. 08.

담당	성명	소 속	전화번호	e-mail
	박홍수	아시아문화원 라이브러리파크TF팀	062-601-4435	blade9690@aci-k.kr

Ⅰ		개요

1. 과업명 :「국립아시아문화전당 라이브러리파크 공간개선 실시설계」용역

2. 과업목적

가. 라이브러리파크 공간개선 기본설계 결과에 따른 공법 및 실시방안 강구

나. 리모델링 및 가구제작 공법에 따른 자재, 물량 산출 및 내역

다. 라이브러리파크 공간개선 공사를 위한 설계도서 작성

3. 과업 기간 : 계약체결일로부터 40일(공휴일 포함)

가. 과업기간까지 인‧허가 등 승인 완료 후 실시설계도서를 납품 함.

나. 실시설계도서의 납품 이후라도 관계기관과의 건축협의 등 각종 인‧허가에 관련 등 협의가 필요한 경우 지원 업무를 하여야 한다.(공사착공전까지)

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

4. 과업 개요

가. 위치: 광주광역시 동구 문화전당로38 국립아시아문화전당 라이브러리파크  B3 및 B4 일부

나. 규모 : 공간개선 연면적 8,169㎡(B3 7,729㎡, B4 일부_선큰가든:440㎡)

다. 공사비(추정)예산액: 1,578,000,000원(VAT 포함)

1) 제시된 공사비는 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리비, 자재비 등에 대한 총 공사비이며, 필요시 각종(전기/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.

2) 설계자가 산출하는 추정공사비는 공사비 예산액을 초과하여서는 아니 된다.

※ 사이니지 등은 별도사업으로 진행

5. 과업의 범위

가. 본 과업은『국립아시아문화전당 라이브러리파크 공간개선 공사』실시설계 용역에 적용

나. 본 과업은 아시아문화원(이하“발주기관”이라 한다)과 계약대상자(이하“수급인”이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업내용서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사 및 건축설비 등의 제반 행정절차 대행, 공사 발주용 설계서의 작성 및 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

Ⅱ		과업 내용

1. 추진방향

가. 국립아시아문화전당 라이브러리파크의 리모델링을 위한 실시설계 용역으로 기존 시설 및 콘텐츠 노후화에 대한 변화, 공간 재배치, 기술기반 전시 방식 도입에 따른 공간구성, 휴식 등 서비스 공간 보강

나. 아시아문화 관련 아카이브자료를 활용한 열람전시교육 등의 라이브러리파크 공간 본연의 기능 회복

※ 본 과업은‘국립아시아문화전당 라이브러리파크 공간개선 기본설계 용역’납품도서(설계 도면 및 시방서 등)를 근거로 진행하며 사이니지는 별도 사업으로 발주함

2. 과업세부 내용

가. 주요 과업내용

1) 관련기관 인․허가 및 이행

가) 본 과업은 기본설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종심의, 인ㆍ허가에 필요한 서류작성, 관계기관 협의포함

- 방화구획 변경, 소방 등 본 용역의 시행에 필요한 일체의 인․허가는 수급인(본 사업 설계용역 계약자)이 대행하여야 한다.

- 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 기관을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악한다.

- 수급인은 본 용역이 완료된 후에도 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완 등이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

2) 본 과업에 관련된 B4 선큰 신설 계단 구조 계산서 등 각 분야의 기술적 계산서는 건축법 등 관련 규정에서 정한 내용에 의거하여 면허를 가진 관련 전문가가 작성하고, 반드시 작성자가 날인하여야 한다.

- 라이브러리파크의 구조체 설계하중계획도 등을 근거로 결과를 면밀히 검토하여 구조를 계산하고 구조체 하중 및 활하중을 고려하여 신설계단 구조물을 설계한다. 안전여부를 확인하여 건축법 용도상 용도변경이 필요할시 협의하여 진행한다. 또한 신설 구조로 인한 소음, 진동 등이 발생하지 않도록 설계한다.

- 설계가 완료되면 과업기간 이후에도 발주처와 건축협의를 진행하며, 용도변경 시 해당용도로 변경완료를 하여야 한다.

- 구조계산(또는 의견)서는 건축구조기술사의 날인을 받아 제출 한다.

3) 라이브러리파크 공간개선에 가장 효율적이며 적용 가능한 공법 제시

4) M1(도서영역), M2(전시영역), M3(안내·휴게 영역)의 기본설계 결과에 대한 기타 제반 사항 검토 등

5) 실내건축(인테리어, 제작가구, 설비, 실내조경 등)공사, 전기, 소방 공사 등의 발주를 위한 설계도서(건축도면, 내역서, 시방서 등) 작성

6) 북샵(현재 북라운지) 등은 운영 변화에 따라 별도 기본설계 자료를 발주처에서 제공하며 협의 후 이를 실시설계에 반영함

7) 공사 및 감리 범위의 검토

8) 기본설계 수행자의 라이브러리파크 공간계획 의도를 반드시 반영

9) 공사를 2단계로 분리할 경우, 일괄 진행할 경우 공사기간, 공사비, 문제점 등에 대한 비교검토

10) 설계·건설사업관리 용역 손해보험 또는 공제 업무요령 제4조[시행 2019.12.30.][국토교통부고시 제2019-997호, 2019.12.30., 일부개정]에 의해 용역사는 용역업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 이의 배상을 담보하는 보험 도는 공제에 가입하고 용역완료시까지 증서로 제출한다.

※ 기본설계 결과검토 및 설계 관련 라이브러리파크 현장 검토 필수

※ 계약종료 후 공사 진행 과정에서 발생한 설계변경 등 설계자의 의견을 필요로 하는 경우 업무 협조

나. 과업의 시행

1) 용역기간 : 계약체결일로부터 40일

2) 설계안은 착수보고서, 중간보고서(도면 상시설명으로 갈음), 최종보고서(납품서 갈음)를 작성하여 발주기관에 제출, 승인 후 최종 성과품을 납품한다.

3) 발주기관과 심의 회의 등 행정 절차를 이행하여야 한다.

4) 용역기간 연기조건

가) 천재지변 등 불가피한 사유로 용역기간 연기의 필요성이 인정될 때

나) 설계자의 귀책사유 없이 각종 행정절차(건축협의 등)이행에 장기간이 소요되어 불가피하게 용역을 수행할 수 없는 기간에 대하여는 연기할 수 있다.

다) 발주기관에서 연기의 타당성이 인정될 때 연기할 수 있다.

다. 기대 과업의 범위

본 설계용역에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 규정 및 계약내용에 적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 처리 함.

3. 일반사항

가. 착수계 및 기타 제출서류

1) 수급인은 계약 후 5일 이내에 과업에 착수해야 하며 다음 사항이 포함된 착수보고서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

가) 설계예정공정표

나) 책임기술자 선임계

다) 기술자격증 사본 및 인감증명서

라) 참여기술자 재직증명서

마) 보안각서 및 사용인감계

바) 기타 계약문서 및 관련법령에서 제출하도록 규정한 서류

나. 과업수행계획서 제출

1) 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다

가) 목표예산(예상공사비) : 1,578,000,000원(부가세 포함)을 고려해 설계에 반영한다.

※ 사이니지 등은 별도 사업으로 진행

- 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

- 상기와 같이 실시설계가 종료된 후 예산에 맞춰 설계내용을 조정 하여야 하는 상황이 발생하지 않도록 목표예산 범위 내에서 설계를 추진한다.  업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주기관과 협의하여야 한다.

2) 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

다. 업무협의 및 공정보고

1) 과업 수행기간 동안 발주기관과 수급인은 상호 협의 하에 업무협의를 갖는다.

2) 수급인은 성과물의 납품에 맞추어 보고를 시행한다.

3) 수급인은 다음과 같이 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 공정보고서(용역수행 대표자 명의)를 작성하고 발주기관에 보고하여야 한다.

가) 과업 진척보고: 매 7일 단위로 과업진척내용 및 공정현황 등을 감독원에게 보고해야 하며 감독원이 지시하는 사항의 제반 추진 내용을 참여 기술자가 직접 보고해야 한다.

나) 수시보고 : 발주기관이 지정한 감독자가 요청시 수급인은 설계 진행 사항을 보고하여야 하며, 각 단계에서 보고내용에 대한 승인을 얻은 후 다음 단계 업무에 착수한다.

4) 최종보고서

수급인은 설계용역 납품예정일 5일 전에 납품목록 및 성과품에 대한 최종보고를 발주기관에 제출 하여야 하며, 수정을 요하는 부분은 반드시 수정하여 납품하여야 한다. 다만, 수급인이 발주기관에게 제출하여 승인을 득한 후 보완조치에 대한 재 승인사항은 납품기한에서 제외하되 계약이행조건을 우선으로 한다.

5) 수급인은 용역 완료시까지 모든 보고를 서면 또는 이메일 등으로 보고하여야 한다.

라. 설계의 변경 및 조정

설계진행 중 발주기관에서 필요하다고 인정되어 설계내용 변경 또는 수정을 요할시 수급인은 이를 거부할 수 없으며 지체 없이 이행한다.

마. 설계검토

본 과업수행기간 중 발주기관은 필요시 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 수급인이 준비한다.

바. 설계에 사용하는 재료

1) 각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 친환경적, 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬 등이 적합하고, 내부 마감 재료는 다중이용시설 및 소방, 환경 등 관계 규정에 의거 선택하여야 한다.

2) 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 기본설계에서 지정되지 않은 경우 국산자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품과 국토교통부 지정 AT인증, 산업통상자원부 지정 NT인증, 특허, 조달우수제품, 고효율 인증제품, 방염제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다.

3) 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

사. 용역과업의 범위

1) 일반사항

가) 리모델링 공사 및 가구 제작 적용 공법의 정밀한 조사

나) 리모델링 공사 및 가구 제작 방법 제시

다) 대상 시설물, 가구의 평면, 단면 등 실시 계획

라) 주요자재 사용계획 및 구성계획

마) 소요공사비 판단 및 작성

바) 공사 예정공정표 작성

사) 각종 시공 공법, 품질관리 기준 등에 관한 시방서 작성

아) 기타 설계 지침에 명시된 사항

※ 가구, 조명, 구조, 소방 등은 각 전문가와 협업하여 결과 반영 함

2) 시방서

가) 건설공사 표준시방서

나) 기타 공사상 필요로 하는 각종 시방서

다) 자재 시방서 및 특별시방서

3) 공사비 산출서

가) 공사비 내역서(공사원가 계산서)

나) 재료 또는 수량 산출조서

다) 일위 대가표 및 견적서

라) 관급자재 조서(공사별 구분, 해당시)

마) 물가적용 조사서(2개 기관이상 조사 대비)

※ 내역서 작성시 가구제작은 목업제품(샘플) 제작비용을 포함하고 관람객 파손 등을 고려해 제작가구, 조명기구 등은 10% 이상 여분 비용을 반영함. 구매가구 및 바닥재 등 구매품의 경우 3개 회사의 견적 및 제품비교표를 통해 발주처의 승인을 받아야 함.

※ 실내조경은 1년 단위 평균 유지·관리비용을 별도 표기 함

※ 보양(물품 이동, 용접 등), 철거 관련 폐기물 처리비 등 포함

※ 미디어월 해체 및 이전, 신규 미디어월 구입 설치 비용 등 포함하고 월에 연결된 CCTV 이동 및 재설치 내용을 반영함

아. 건물 에너지 이용 효율화를 위해 공공기관 에너지절약 관련 사항을 검토하여 설계에 반영해야 한다. (공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 산업통상자원부고시 제2017-13호)

자. 본 용역의 설계는 건축사법 제23조의 규정에 의한 건축사 사무소등록을 필한 자가 설계할 수 있으며 각 분야별(건축, 전기, 소방, 통신 등) 관련 현황을 충분히 검토하고 중요 협의 사항은 문서로 만들어 제출한다.

차. 유지 관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후, 유지 관리 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 효율적으로 설계하며 소음, 방음, 방범, 방재 등을 고려하여 설계에 반영한다.

카. 타수급인과의 업무한계

- 다수의 수급인이 공동계약 또는 별도계약으로 과업을 수행할 경우에는 업무한계를 명확히 구분하여 계약서 작성 시 제출하여야 한다.

타. 기타

1) 감독: 수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시 감독을 받아야 한다.

2) 관계법령 준수: 수급인은 설계내용이 지방자치조례, 건설기술관리법 등 기타 관련법규 및 제반규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않도록 설계용역 과업을 수행하여야 한다.

4. 공통 사항

가. 안전성 및 공사기간 단축 등을 고려해 라이브러리파크 공사기간 및 일정 계획 검토

나. 방화구획 변경 부분, 소방(소화전 소폭 이전 1개소, 스프링쿨러 철거 2개소 등) 관련 내용 실시설계 반영

다. 전시 공간 인테리어 및 전시물 설계 ․ 제작 ․ 설치(전기, 통신, 소방, 기계, 조명 포함)

라. 관리 ․ 운영자 교육 훈련 및 교육매뉴얼, 공사 및 제작설치물 유지관리 매뉴얼 작성

마. 라이브러리파크 공간개선 공사시 현장작업은 최소화 할 수 있도록 도면에 반영(외부에서 용접, 조립 가능한 부분은 최대한 반영)

바. 과업범위 내 기존 설치물(사이니지 등) 철거, 폐기물처리 비용 반영

사. 기타 발주처가 요구하는 사항 및 사업진행과정에서 변경되는 항목은 발주처와의 협의를 통해 조정함

5. 과업 전체일정(안)

세부 내용	2020년
	8월	9월
계약 및 착수
사업 수행/점검
착수 보고
중간 보고 / 수시 보고
결과 보고
최종설계도서 납품 및 정산

Ⅲ		과업의 특수 조건

제1조 (작업반의 구성)

가. 용역자는 본 과업을 수행함에 있어 건축설계 기술자로 구성된 팀을 편성하여 본 과업에 임하여야한다.

나. 전문 분야별 설계는 기술용역업체의 해당기술자가 책임수행 한다.

다. 용역자는 본 과업을 수행하게 될 작업반 참여기술자의 자격증사본과 용역업체를 증명할 수 있는 서류를 착수계 제출시 발주기관에 제출 하여야 한다.

제 2 조 (감독)

용역자는 본 과업을 수행함에 있어 발주기관의 감독을 받아야 한다.

제 3 조 (착수)

용역자는 계약후 5일 이내에 본 과업을 착수하여야 하며 착수시에는 착공계를 제출하여야 한다.

제 4 조 (보고)

용역자는 부분별 진행사항을 다음과 같이 발주기관에 서면보고한다.

가. 실시설계 : 계약일로부터 5일 이내 착수계 제출.

나. 완료보고 : 실시설계 도서를 완료하기 5일전 감독관 검토 후 완료.

※ 설계보완 할 수 있는 시일감안, 제출

제 5 조 (설계 용역)

가. 당 사업은 본 과업내용서 및 시설물 설치에 따른 각종 법적 기준을 근거로 하여 용역 시행하되 과업 수행중에 문제점이나 의문사항 또는 해석상에 차이가 있는 경우에 대하여는 수시로 보고하고 발주기관의 지시에 따른다.

나. 법령 등을 적용함에 있어서 적용등급이 있는 경우에는 이 사업의 품질 확보상 유리한 등급을 우선 적용한다.

제 6 조 (작업 지시)

발주기관은 설계 진행중 또는 납품 후라도 설계변경, 기타 필요 사항을 용역자에게 지시할 수 있으며, 용역자는 즉시 이행하여야 한다.

제 7 조 (심사 등)

용역자는 성과품을 납품하고자 할 때는 용역 준공계 및 성과품을 용역감독을 경유하여 제출하여야 하며, 변경사항이 있을시 발주기관에서 지정하는 기일 내에 이를 수정․보완하여야 한다.

제 8 조 (요구조건의 변경 및 반영)

가. 용역자는 설계 및 성과물 납품과정에서 발주기관이 제기하는 의견을 특별한 사유가 없는 한 최대한 반영 하여야 한다.

나. 용역자는 발주기관의 사정에 의한 요구조건이 변경되었을 경우에는 이에 따라 과업을 지체없이 수행하여야 한다.

제 9 조 (하자 보완)

가. 용역자는 성과품에 대한 검수가 완료된 날로부터 1년간 설계도의 하자에 대한 책임을 진다.

나. 납품된 설계도서에 하자가 발생되었을 경우 용역자는 발주기관의 지시에 의하거나 스스로 이를 보완하여야 한다.

제 10 조 (책임)

가. 용역자는 설계상의 하자로 인하여 시설물의 구조적인 부실, 인명피해, 예산 손실 등으로 당 발주기관에 손실을 초래하였을 경우 공사 중이나 준공 후라도 이에 대한 기타 민․형사상 책임을 진다.

나. 용역자는 본 사업과 관련하여 발주기관의 필요에 의한 자료제출 등의 요구가 있을 시에는 과업수행기간 및 완료 후라도 요구하는 자료나 의문사항 설명에 성실하게 응하여야 하며 각 분야별 기술 사항에 대하여 책임자로 하여금 질의에 답변하도록 하여야 한다.

제 11 조 (소유권)

가. 용역자가 본 계약에 의거 작성 제출한 설계도서 및 관련 자료의 소유권, 저작권, 작품의 처리권한은 발주기관이 소유한다.

나. 이 사업과 관련되는 내용을 발주자의 사전승인 없이 다른 인쇄, 출판물 등에 게재하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

제 12 조 (허가, 수속 등)

가. 용역자는 실시설계 용역 완료시 관련법규에 의한 인․허가를 득하기 위하여 필요한 서류를 동시에 제출하고, 관련 인.허가를 득할 때까지 제반 책임을 져야 한다.

나. 상하수도, 소방 등의 수탁공사에 대하여는 관련 부서와 협의 후, 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

제 13 조 (계약의 해제 또는 해지)

가. 발주기관은 용역자가 의무를 이행하지 않거나 이를 게을리 할 경우의 시정을 요구할 수 있으며 용역자는 지체없이 적절한 조치를 취하여야 하며 이에 불응 시에는 계약을 해제 할 수 있다.

나. 발주기관의 사정으로 인하여 본 용역의 진행이 일부 또는 전부가 불필요하다고 인정될 경우에는 그 사유를 명시하고 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제 14 조 (해지의 효과)

가. 계약의 해제는 상대방이 해제통지를 받은 날로 본다.

나. 계약이 해제된 경우 용역자는 발주기관으로부터 제공받은 일체의 자료와 용역 수행시 작성한 일체의 문서, 도면, 기타자료를 발주기관의 지시에 따라 처리하여야 한다.

제 15 조 (이행의 보증)

용역 계약시 아시아문화원이 제시한 계약내용에 따른다.

제 16 조 (용역종사원)

가. 용역자는 용역수행에 적절한 기술능력 보유자를 확보하여야 한다.

나. 발주기관은 필요하다고 인정될 경우 이의 교체 또는 보강을 요구할 수 있으며 용역자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야한다.

제 17 조 (비밀엄수)

가. 용역자는 용역수행 전․후를 막론하고 본 용역과 관련 업무상 알게된 제반사실에 대하여 발주기관의 승인없이 공포하거나 누설 하여서는 안되며 보안유지 불이행으로 발생되는 책임은 용역자에게 있다.

나. 설계서 보완 등

용역 종료시나 공사진행 중 설계보완에 대한(설계도면 미비 및 부적합한 부분, 산출근거 상이, 구조계산 상이 등) 발주기관(공사감독 포함)의 요구가 있을 때는 용역자는 즉시 설계변경 도면을 작성하여 발주부서에 제출 한다.

제 18 조 (적응 요령)

가. 용역의 수행은 본 내용서에 의하되 세부적인 사항은 용역자가 보다 합리적인 안으로 연구․발전시킨다.

나. 본 내용서 외에 정부 및 관계법규, 각종 시행기준을 준수하여야 하며       본 내용서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 내용서를 우선 적용하고       본 내용서 및 자료에 의한 변경이 있을 시에는 발주기관 감독과 협의하여   합리적으로 과업을 수행하도록 한다.

다. 본 내용서에 제시된 사항은 용역자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용서의

내용이 불분명하거나 명시되지 않은 사항은 발주기관의 지시에 따른다.

라. 본 내용서에 대하여 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주기관 승인 후 채택될 수 있다.

마. 용역을 수행함에 있어 발주기관 및 관계부서와 긴밀한 협조체계를 유지하고

분야별 전문가의 참여를 유도하여 보다 광범위한 의견을 집약 시킨다.

바. 각종 계산 기준은 한국표준규격을 사용하여야 하며, 외국의 기준을 적용 할 수 있으나 이 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

사. 특수한 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영할 경우에는 공인 기관의 검토 보고서가 있어야 한다.

제 19 조 (설계지침)

가. 공통지침

1) 건축설비 설계도서(도면, 개략내역 등)를 작성, 발주기관의 심의를 받은 후 그 결과를 수용하여 설계를 추진할 것.

2) 설계는 경제성에 입각하여 자재 및 공법이 제시되어야 하고, 내구성과 외력에 대한 안전성이 고려되어야 한다.

3) 에너지 절약을 위한 대책이 검토되어야 하며, 사후 유지관리비 등 경제성이 비교, 검토되어야 한다.

4) 설계도서 및 내역서 산출조서는 전문분야(공종)별 및 사업장별로 작성한 후 총괄도서(공사비 내역서 집계 및 자재 집계표 포함)를 작성 제출하여야 한다.

5) 설계는 공사기간과 공사비 예산을 감안하여 이에 적합 하도록 구조, 재료, 시공방법 등이 제시 되어야한다.

6) 사용자재는 사후 관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재는 발주기관과 협의 후 채택되어야 한다.

7) 공사비 산출은 정부관계 기준을 따르되 객관적 산출근거가 되어야 한다.

8) 시방서는 설계도면에 명시되지 아니한 시공방법, 품질관리 기준 등 시공에 관련되는 사항으로 일반시방서와 특기시방서 및 자재 시방서로 구분, 작성되어야 한다.(기본설계 시방서 확인 필수)

9) 설계도서는 실시설계로 작성하여야 하며, 분야별 설계도서(건축-제작가구 포함, 구조, 전기, 소방 등)는 관련 면허를 가진 회사가 작성하고 책임기술자, 현황 등 조사자, 설계도서 작성 실무자 성명을 도면상에 표시하고 서명 날인 후 용역 성과품을 납품 하여야 한다.

10) 실시설계 제출 도서는 용역 성과품에 명시된 것으로 한다.

11) 설계도면을 작성함에 있어 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 하여야 한다.

Ⅳ		실시설계 용역 과업지침

1. 건축 분야

가. 장애인시설: ｢장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률｣에 따른 편의시설 설치기준 준수, 배리어프리 적용 필요

- 안내데스크(접수대) 휠체어 이용객을 위한 높이를 낮춘 구간 필요

※ 장애물 없는 생활환경(BF)인증 상세표준도[건축물](보건복지부, 한국장애인 개발원) 반영 : 신설계단(장애인 관람석 포함), 열람석, 접수대 및 안내데스크, 출입문, 경고블록 등

나. 마감재: 기존시설과 조화를 이룰 수 있도록 통일감 부여하거나    영역별 통일성 있는 마감재 선정 필요

- 신설되는 썬큰 난간의 소재는 기존시설과 어울리도록 현 기본설계 상의 철재에서 스텐(헤어라인)로 변경 필요

- 실내 화분의 녹이 발생(현 설계상 철재)되지 않는 소재로 변경

다. 기계:‘지하3층에서 지하4층으로 연결되는 계단부분(C10~C13)’과 ‘주변부’의 기존 공조덕트 급기‧배기 부분에 대해 기존 단면적 이상의 공간이 확보될 수 있도록 하고, 변경 후에도 원활한 급배기가 이루어 질 수 있는 구조로 시공 필요

라. 기타 주요 사항

1) 건축설비 설계를 함에 있어 설계자는 설비계획의 기본구성과 취지를 파악하여 설비의 종류 및 방식 등을 전기, 기계, 소방분야와 긴밀히 협의하여 설계 계획한다.

2) 에너지 절감 및 제반 재해방지 대책을 충분히 반영하여 설계 계획        3) 전기, 소방, 통신, 기계설비 등과 연관성을 고려하여 설계 계획한다.

4) 각종 설비는 습기에 대한 철재류 부식이 되지 않도록 재료를 반영하고    부식 예방을 위한 설계를 진행한다.

5) 향후 시설확충 및 유지보수 등 관리에 유리하도록 설계 계획한다.

6) 현대적인 공법을 도입하고 안전성을 확보, 합리적으로 설계한다.

7) 기존 시설물 철거시 주위의 건물에 피해가 가지 않도록 안전성을 고려하여 설계 계획한다.

2. 전기 분야

가. 조명: 카페바 및 북라운지1에 설치되는‘PENDANT LIGHT’및‘SUSPENDED PENDANT’조명은 회전에 의한 전선꼬임, 그에 따른 전선의 부서짐, 또는 조명기구 낙하 사고 등의 방지를 위한 견고한 구조(회전트랙 또는 지지물 보강)로 설치계획 필요.

나. 전기: 신설 전열라인(바닥 배관 배선 포함)은 반드시 전용 트레이를 설치하여 배관․배선하여야 하며, 화재의 위험이 있는 구간에는 트레이 덮개 계획 필요.

다. 통신: 신설 통신라인(네트워크 포함)은 반드시 TPS실 또는 공급원에서부터 연결부(접속점)없이 신설하여야 하며, 방송설비(비상방송 라인 포함)는 모든 구역에서 비상방송 청취가 가능하도록 분포하여 설치하고, 기존 선로와 연동 설치계획 필요.

3. 소방 분야 (스프링쿨러 2개소 철거 및 소화전 이동 등 반영)

가. 소방: 지하3층 B05 방화벽 설치부분의 출입문(기획전시실 출입문)이 기존 방화셔터 비상문과 간섭되지 않도록 할 것, 기존 방화셔터 비상문 상단의 유도등은 신설되는 방화벽 출입문 상단으로 이설 존치 계획함.

나. 자동화재 탐지설비 검토 설계

다. 화재수신반 규격 방식 등에 대한 검토 보고

라. 감지기의 위치, 종류, 설치면적에 대한 검토 설계

마. 기계분야의 소방시설 자료 검토 후 연계하여 설계

바. 소방법 및 소방 관련 각종 규정에 적합하게 설계

사. 유도등 설비(해당시) : 소방대상물 및 장소별 피난유도등 표지와 통로 유도등 표지 설계

4. 공통사항

가. 기본설계도서의 도면(실시설계 및 공사입찰용) 및 NOTE, 시방서의 내용을 반영할 것.

나. 안전 및 신뢰성이 높은 설비로 구성할 것

다. 제어부분 및 기타설비는 전기, 기계설비 등 최대한 협의하여 반영 할 것.

5. 법령 등의 적용 기준

가. 본 과업은 건축법, 해당 지자체의 조례, 전력기술관리법, 전기공사업법, 전기통신기본법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등 당해 사업 관련된 법, 동법 시행령 및 시행규칙과 각종 고시, 지침 등에 위배되지 않도록 한다.

나. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 기술용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기 할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야한다.

일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

6. 일반지침

가. 본 과업은 건축법, 해당 지자체의 조례, 전력기술관리법, 전기공사업법, 전기통신기본법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등 당해 사업 관련된 법, 동법 시행령 및 시행규칙과 각종 고시, 지침 등의 위배가 없어야 한다.

나. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 기술용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기 할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 한다.

이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

Ⅴ		성과품의 작성 요령

1. 설계도서의 분리작성

가. 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 맞게 필요시 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축폐기물처리도서(건설폐기물, 소각폐기물, 석면폐기물)는 분리발주 해당 시 분리발주가 가능하도록 작성하여야 한다.

2. 도면작성

가.“국토교통부 고시 제2016-1025호(2016.12.30) 건축물의 설계도서 작성기준”을 준수한다.

나. 도면규격은 A3규격을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 검토용 도서 및 납품도서는 반책을 원칙으로 하며, 발주처에서 원하는 경우 각 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 제출하도록 한다.

다. 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 각 공사간의 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등)를 작성 및 공인기관 기술검토서 첨부

3. 설계내역서 작성

가. 공사비 계산은 기획재정부 제정 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가계산 방식에 의거 작성한다.

나. 원가계산

기획재정부가 정한 회계예규에 따른다.

다. 산업재해 보상보험요율

고용노동부에서 고시한 보험요율에 따른다.

라. 안전관리비

고용노동부 고시에 의한 건설공사 표준안전관리비 산정기준에 따른다.

마. 재료 산출, 단가산출서 작성

재료산출, 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공종별, 재료별로 산출하며, 참조하기 편리하도록 편집하고 공종별 단가는 산출서 상에 구체적으로 명시되어야 한다.

바. 공사비 적산은 정부표준품셈, 정부노임단가, 적산기준 통해 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

(단, 표준품셈에 없는 사항은 별도처리- 2개이상 조사기관 근거서류 첨부)

사. 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

아. 수량 및 단가산출은 공종별, 재료 별로 산출하여 편집하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 명시하여야 한다.(발주기관 요구에 따라)

자. 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 기준으로 적용하고 이에 누락된 품목은 일반 시장조사를 하되 공신력이 가장 뛰어났다고 판단되는 시중자료 책자 등과 직접 시장 조사된 2개 이상의 견적서 및 거래실례가격 등에 의한다.

차. 공사자재 단가 결정은 거래실례 가격에 기준한다. 단, 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

카. 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합하도록 결정하여 적용한다.

타. 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하고 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교하여 경제적이고, 합리적인 공법을 채택하여 적정 산정한다.

파. 사용단위는 소수점이하 2위까지 하고 끝수는 반올림 한다.

하. 자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다. K.S에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방서(외국규격등)을 검토하여 사용토록 한다.

4. 공정표

가. 본 과업의 공사 공정표는 공사기간 및 공사의 내용 파악되도록 공사기간별 세부 공종이 상세히 나타나도록 네트워크식 공정표(Over lapping 적용)를 작성하여 제출한다.

나. 특별시방서에 명시되어진 공종 중 발주처에서 지정하는 주요 공정은 별도로 공정표를 작성한다.

※ 발주처에서 예상 공정표 제공

5. 성과품 납품 규격 및 부수

구 분		규 격	재 질	납품수량	비 고
1	설계도서 USB	-	-	3개
2	설계설명서 (세부공정계획 포함)	A4 제본	백상지	10부
3	공사 시방서	A4 제본	백상지	10부
4	설계도면	A3 평철 제본	백상지 (비닐 커버)	10부
		A4 반책 제본	백상지 (비닐 커버)	10부
5	설계내역서	A4 제본	백상지	10부
6	일위대가표 (산출근거 자료 첨부)	A4 제본	백상지	10부
7	수량산출서 (산출근거 자료 첨부)	A4 제본	백상지	10부
8	단가조사표 (산출근거 자료 첨부)	A4 제본	백상지	10부
9	기타 발주자가 요구하는 도서(자료)	발주청과 협의하여 결정			관리운영자 교육 매뉴얼 등

※ 성과품은 발주처 협의 후 내용 구성 및 납품

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 :

3. 착수  일자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀 사항을 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2020년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

성        명 :                   (인)

아시아문화원 귀하