국립현대미술관 덕수궁 내진보강공사 설계용역 과업내용서

2021.2.

Ⅰ		일반사항

1.1 용역 명칭

국립현대미술관 덕수궁 내진보강공사 설계용역

1.2 과업 목적

본 과업의 목적은 용역대상 시설물의 내진성능평가 결과를 바탕으로 내진보강공사를 수행하기 위한 설계도서 작성 및 내진보강공사 관련 관계기관의 허가를 득하는데 있다.

1.3 시설물 개요

1) 시설물명: 국립현대미술관 덕수궁

2) 위    치: 서울 중구 세종대로 99 덕수궁

3) 시설물 제원

시설물 종류	구조형식	제원	준공년도	비고
미술관	철근콘크리트, 석조	3층/ 3,428.47㎡	1936년

1.4 과업 범위

1) 기초자료 수집 및 분석

(1) 내진성능평가 보고서 분석 및 관련 법규, 기준 및 매뉴얼 등의 분석

(2) 대상 시설의 현황조사를 위한 추가 현장조사

(3) 대상 시설의 내진등급기준 등 확인

2) 성능기반평가법에 의한 내진성능평가(설계최적화 필요 시)

(1) 대상 시설의 동적 특성에 적절한 내진성능평가법 결정

(2) 기준 및 매뉴얼에 충실한 성능기반 내진성능평가(m계수법, 비선형정적절차법, 비선형동적절차법 등) 수행

(3) 내진성능목표 만족 여부의 정확한 판단(내진성능목표 만족 시 사업종료)

3) 일반공법 보강설계

(1) 내진성능 향상을 위한 일반공법을 적용한 보강설계

(2) 개략의 공사기간 및 공사비 산출(협의를 위한 자료)

4) 특수공법 보강설계(필요 시)

(1) 일반공법 적용이 어려운 경우 책임구조기술자의 책임하에 특수공법 보강안 제시

(2) 공법심의위원회 심의 및 발주처, 관계기관 허가 등 협의 대응

5) 실시설계

(1) 실시설계도면, 설계내역서, 시방서 등 보강공사 시 필요한 설계도서 및 발주에 필요한 서류 등 작성(문화재수리 설계도서 작성기준 이행)

(2) 문화재 설계승인 및 현상변경 심의 자료 작성 및 절차 이행

6) 기술감리 협조 사항(발주처와 협의하여 결정)

(1) 과업수행자(책임구조기술자)는 본 설계 완료 후 내진보강공사에 현장 기술자문으로 참여(필요시만)하여 설계자의 의도(설계도서)에 따라 정확한 시공을 통해 내진성능을 발휘할 수 있도록 기술감리 업무를 수행하여야 한다.

(2) 책임감리자는 본 용역의 책임구조기술자이고, 특수공법을 적용한 경우에도 책임구조기술자가 직접 기술감리를 수행하여야 한다.

1.5 과업 기간

본 용역의 기간은 착수일로부터 90일간으로 한다.

1.6 용어의 정의

1) 내진보강설계 용역 및 검증용역 발주처는 ‘발주처’로 명칭한다.

2) 내진보강설계 수행자는 ‘설계자’, 또는 계약상대자’로 명칭한다.

3) 내진보강설계 검증위원회는 ‘검증위원’으로 명칭한다.

4) 설계도서란 문화재수리와 관련한 고증조사 관련 자료, 설계도면, 시방서, 내역서, 수량산출서, 사진첩, 구조도면, 구조계산서 등의 도서를 말한다.

Ⅱ		적용기준 및 준수사항

2.1 적용 관련 법령 및 기준

1) 공통

(1) ｢지진‧화산재해대책법｣ 및 ｢동법 시행령｣

(2) ｢지진‧화산재해대책법｣ 제14조에 따른 시설별 내진설계기준

(3) 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조, 동법 시행령 제9조

(4) 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침

2) 건축물

(1) ｢건축법｣ 및 ｢동법 시행령｣, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

(2) 건축구조기준(KBC)

(3) ‘기존 시설물(건축물)의 내진성능 평가 및 향상요령(한국시설안전공단)’

(4) 콘크리트 구조설계기준(국토해양부)

(5) 콘크리트 표준시방서(국토해양부)

(6) 건설기술진흥법 품질시험 규정

(7) 문화재 수리에 관한 법률, 문화재수리 설계도서 작성 기준 등

2.2 일반사항

1) 착수계 및 기타 제출서류

(1) 계약상대자는 착수계 제출 시 다음 제반서류를 계약일로부터 10일 이내에 제출하여야 한다.

① 착수계

- 책임구조기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

- 재직 증명서

- 기술자 경력증명서(책임기술자에 한함)

- 각 분야별 용역비 산출내역서

- 자격증 사본

- 과업수행계획서

․ 관련분야별(해당시) 업무범위와 책임한계

․ 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

․ 각 분야별 인력투입계획

․ 예정 공정표

․ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

② 보안각서

③ 완수계

- 완수계

- 완수검사원

- 대금청구서

- 합의서(필요 시)

- 완수내역서

- 통장사본

- 성과품 목록

④ 하도급 통지 등 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 업무협의 및 공정보고

(1) 계약상대자는 착수계 제출 후 발주처와 협의하여 다음과 같은 경우에는 업무협의를 실시한다.

① 조사 및 자료 수집의 완료 시

② 내진보강설계 완료 시

③ 공정보고 시(필요시)

④ 용역 완료 시

3) 관련기관 인․허가 및 협조

(1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가(대수선 포함) 및 문화재수리 설계승인 등 절차에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 하며 현상변경 관련 심의 시 자료 준비, 설명 등 전반적 업무를 수행한다.

(2) 계약상대자는 동 사업 인․허가사항에 대하여 발주처와 협의하여 가능한 용역기한 내에 승인 등 모든 행정절차를 완료하여야 한다.

4) 설계에 사용하는 재료

본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

5) 과업의 변경 등

본 과업수행 중 발주처의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

6) 기타사항

과업수행은 아래 사항을 숙지하고 예정공정표에 따라 성실히 수행하되, 발주처에 제출한 과업수행계획서에 따른다.

(1) 본 과업수행 세부계획수립을 위해 사전 답사를 실시한다.

(2) 계약상대자는 본 과업지침 내용을 숙지하여 전반적인 과업 업무를 성실히 수행하여야 한다.

(3) 계약상대자는 본 과업지시서 및 관계 법령, 규칙 및 지침에 따라 제반 사항을 성실하게 이행하고 수행한 본 과업의 성과에 대한 모든 책임을 진다.

(4) 발주처가 인정하는 특별한 사유가 없는 한 공정 지연으로 인하여 발생되는 손해 책임은 계약상대자에게 있다

(5) 기타 필요한 사항은 발주처와 협의하여 처리한다.

2.3 특기사항

1) 발주처 요구 시 계약상대자는 용역 종료 후라도 각종 심의 시 필요할 경우 용역의 결과물에 대한 설명 또는 설명서 작성, 출석설명 등 최대한 업무에 협조하여야 한다.

2) 용역수행 결과와 관련하여 내진보강설계 검증, 내진보강공사 시공‧준공 및 지진 인증 단계에서 발주처의 자료 요구 및 협의에 협조하여야 한다.

3) 내진보강설계 검증 협조

(1) 계약상대자는 내진보강설계 검증위원이 실시하는 단계별 검증절차에 적극 협조하여야 하며, 이로 인한 별도의 추가대가를 지급하지 아니한다.

(2) 계약상대자는 내진보강설계 검증위원에게 발주처로부터 제공받은 모든 자료를 공유해야 하며, 구조해석 상의 모든 전자파일(소스파일, 실행파일, 해석모델링 자료)을 포함하여 생산한 모든 자료를 검증위원에게 제공하여야 하고, 검증위원의 요구 및 질의사항에 대하여 성실히 답변해야 한다.

(3) 내진보강설계 검증위원에게 설계일정과 전체 자문일정을 제출하여 검증일정을 조정한다.

(4) 설계자는 내진보강설계 항목의 각 절 마다 검증위원에게 설계자의 결정내용을 문서화하여 통지하고, 검증위원의 의견을 회신 받아 최종결정하여 설계에 적용한다.

(5) 검증위원과 의견이 불일치할 경우 해당 근거와 함께 과정 및 최종 적용의견에 대해 상세히 정리하여 제출하여야 한다.

4) 에너지 소산장치(면진,제진장치) 및 특허·신기술이 적용된 공법을 이용하여 설계한 경우, 내진보강설계 검증과 별개로 별도의 공법심의를 통과해야 한다.

2.4 일반 수행 지침

1) 적용 요령

(1) 용역 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킬 수 있으며, 이 경우 발주처의 승인을 거친다.

(2) 본 과업지시서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주처와 협의하여 정한다.

(3) 본 과업지시서에 대한 대안은 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성있는 자료를 제출하고 발주처의 승인을 얻은 후 채택될 수 있다.

(4) 발주처 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(5) 각종 계산 기준은 외국 기준을 적용할 수 있으나, 발주처와 협의하여야 한다.

(6) 설계도면 및 시방서에 특정제품을 사용할 수 없으며, 부득이 한 경우 발주처에서 운영하는 공법심의회 등에서 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

2) 발주처와 계약상대자의 책임 및 업무

(1) 용역 목표와 추진 절차

① 계약상대자는 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 과업내용을 파악하여 최상의 진단이 되도록 해야 하고, 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

② 계약상대자는 합리적으로 용역을 추진하기 위해 용역 착수 시 발주처가 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.

③ 계약상대자는 발주처 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

④ 용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주처에게 보고할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주처와의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

⑤ 계약상대자는 동 용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대하여 즉시 발주처에 알려야 한다.

⑥ 용역 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

(2) 일정계획 및 보고

① 계약상대자는 착수계 제출 시 용역 수행에 관한 세부일정 계획서 및 진단 참여자 조직표․비상연락망 등을 제출하여 발주처와 협의하여야 하며, 공정은 모든 일정이 서술되어야 한다.

② 계약상대자는 착수신고서 제출 후 발주처와 협의하여 정기 또는 수시 업무협의회를 실시하고, 업무협의 실시내용은 보고서에 기록한다.

(3) 보  안

① 업무 내용의 비공개 : 계약상대자는 발주처와 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주처의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

② 검토 및 협의 창구 단일화 : 계약상대자와 발주처의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 협의 창구는 단일화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

(4) 과업변경(발주처 승인에 의한 업무내용 변경 시 계약변경)

① 발주처는 용역 계약의 관리에 책임이 있고, 계약상대자는 발주처의 승인이 없는 한 계약서를 위반할 수 없다.

② 업무 내용 변경은 발주처와 계약상대자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

③ 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 계약상대자가 상호 협의하여 결정하기로 한다

④ 천재지변 등 불가피한 사항이 발생하여 과업의 정상적인 수행이 불가능한 경우에는 도급금액의 범위 내에서 용역의 내용 또는 기간을 상호 협의하여 변경할 수 있다.

⑤ 과업물량의 증감이 필요한 경우에는 예산의 범위 내에서 설계 변경 할 수 있다.

⑥ 본 과업 수행 중 정책의 변경이나 발주처의 기본 방침이 변경, 과업 내용 중 일부 또는 전부의 변경이 필요할 때에는 발주처의 방침과 결정에 따라야 한다.

⑦ 과업의 항목 및 주요내용이 누락, 변경 또는 불분명한 경우, 발주처와 계약상대자 상호 간의 협의를 원칙으로 하되, 상호 이견이 있을 때는 과업의 목적이 부합되는 범위 내에서 발주처의 요구 및 해석에 따라 수행한다.

⑧ 계약상대자는 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행에 필요하다고 판단되어 발주처에 요청할 경우에는 이를 성실하게 이행하여야 한다.

⑨ 본 과업의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비, 과오 등의 결격사항이 발견된 경우에는 용역완료 전․후를 막론하고 발주처 지침에 따라 지체없이 계약상대자의 비용부담으로 보완조치 하여야 한다.

⑩ 본 과업의 발주처는 과업수행을 위하여 공공기관 등과 협의가 필요한 경우, 이를 적극 지원 조치한다.

(5) 공사비와 예산

① 용역 수행 시 발주처와 협의하여 적정 예산 관리에 노력해야 한다.

② 환경친화형 설계에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 발주처의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

③ 상세내역 작성은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

2.5 문화재 관련 사항

1) 덕수궁미술관(사적)의 특성상 공사 시 문화재보호법에 따른 현상변경 등의 별도 절차가 필요하므로 이를 숙지하여 절차에 필요한 자료를 발주처에 제출한다.

2) 내진보강공사로 인한 문화재 훼손이 최소화될 수 있는 보강 방안을 강구한다.

3) 문화재수리에 관한 법률 및 문화재수리 설계도서 작성기준 등에 따라 설계도서를 작성하고, 설계 승인절차를 책임지고 완수한다.

2.6 설계 공통지침

본 과업지시서는 설계상의 제반조건을 규정한 것으로, 설계진행의 일관성을 유지하고 원활한 시공을 도모하기 위한 지침을 정하는데 그 목적이 있다.

1) 일반조건

(1) 본 과업지시서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 발주처와 협의하여 처리하되, 의견이 불일치될 경우 과업지시서와 관련 규정상 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

(2) 본 과업지시서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

(3) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

① 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.

② 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주처의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

③ 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안 된다.

(4) 고효율에너지기자재 보급 촉진규정, 에너지이용합리화법에 의한 고효율에너지기자재 보급 촉진규정으로 인증된 고효율기자재를 우선 사용을 검토한다.

(5)『녹색제품 구매 촉진에 관한 법률』에 의한 녹색제품 사용을 검토한다.

(6) 본 지침에 명시되지 아니한 사항은 발주처와 협의하여 처리하여야 한다.

(7) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임진다. 계약상대자는 부실설계 시 공사 입찰단계, 시공단계에 발주처에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성 및 제출해야 한다.

(8) 지반보강이 수반되는 경우에는 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항을 충분히 검토, 반영하도록 한다.

(9) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 않도록 태풍, 혹서, 혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

(10) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

(11) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주처에 제시하여야 하며, 발주처의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우는 계약상대자가 설계도서를 수정하여야 한다.

2) 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신(근)의 정부제정 각종 공사시방서 및 기준에 의거(적용하는 기준은 최신에 제정된 것을 우선하여 적용) 설계를 수행하여야 한다.

3) 성능기준

본 사업의 설계는 다음의 성능 이상이 확보되어야 한다.

(1) 구조 안전 성능

① 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

② 하중 및 지반조건에 안전하여야 한다.

③ 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 방진․내진․내풍․내설․내충격 성능을 가져야 한다.

(2) 내구성능

① 부식성자재는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되 부득이 사용해야 할 경우에는 방청처리를 통해 최대한 부식되지 않도록 하여야 한다.

② 자재 등은 부위별 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.

(3) 방․내화 안전성능

① 구조물은 내화구조로 하여야 한다.

② 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 발주처에서 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.

(4) 방수성능

① 기존 시설물의 보수․보강 시에 어느 부분도 누수가 발생되지 않도록 하여야 한다.

② 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열에 충분히 대응할 수 있는 성능과 장기적으로 주변 환경조건에 충분한 내구성능이 있는 것이어야 한다.

③ 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유가 있어야 한다.

(5) 유지관리

① 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

② 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게 구입할 수 있는 것이어야 한다.

(6) 문화재 관련

① 문화재 수리규범을 준수하여 설계도서를 작성한다.

2.7 문화재(건축)설계지침

1) 재료 및 마감설계

(1) 재료는 시설물의 특성 및 기존 건물과의 조화를 고려하여 선택한다.

(2) 경제성 및 내구성이 좋은 자료를 선택해야 하며 유지, 보수가 용이하고 수급성 및 시공성 또한 재료선택 시 고려해야 한다.

2) 마감설계

(1) 마감공법에 조적벽이 선정된 경우에는 구조체에 긴결되어야 한다.

(2) 마감공사에 외벽공사 및 창호공사가 포함될 경우에는 「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 ‘건축물의 에너지절약설계기준’을 적용하여야 한다.

(3) 공사범위에 석면공사가 포함될 경우에는 「석면안전관리법」에서 정하는 기준을 적용하여야 한다.

(4) 내진보강공사에 따른 전기.통신.소방.기계 등 설비 마감복구설계도 포함한다.

2.8 구조설계지침

1) 기본사항

(1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 구조물의 균열발생을 최소화 할 수 있도록 계획하여야 한다.

(3) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.

(4) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

(5) 설계자는 동 설계가 건축법상 대수선에 해당될 경우 대수선 승인 관련 서류를 제출하여야 하며, 문화재 설계승인 및 현상변경 심의에 통과할 때까지 관련 서류 작성 및 제출한다.

(6) 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성하여 이해하기 쉽게 한다.

(7) 덕수궁의 문화재적 특성(사적)을 고려하여 문화재 훼손을 최소화 할 수 있는 내진보강 방안을 모색해야 한다.

2) 구조계획

(1) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.

(2) 구조부재 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

(3) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.

(4) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

(5) 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시해야 한다.

3) 구조설계

(1) 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.

(2) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침을 명시한다.

(3) 설계기준 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고규준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.

4) 구조해석

(1) 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을 사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하는 자료를 첨부한다. 단, 그 자료는 공인된 기관에서 인증을 받은 것이어야 한다.

(2) 구조해석용 프로그램의 입력 자료는 구조해석 모델의 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는 부재별, 층별로 선후 관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리한다.

5) 시방서 작성

(1) 구조설계의 시방서는 실제공사에 요구되는 시방을 구체적으로 작성하여야 한다.

(2) 특수공법을 적용한 경우에는 시공매뉴얼을 제출하여야 한다.

5) 철거공법 지침

이 절은 내진보강공사를 위하여 구조체 등의 철거 시에 적용한다. 다만, 이장에 표기되지 않은 사항은 ‘문화재수리표준시방서’를 따르며 이 시방서에 없는 내용은‘건축공사표준시방서’에 따른다.

6) 철거공법의 선정

철거작업은 다음 조건을 고려하여 적절한 공법으로 선정한다.

(1) 대상 구조물의 구조규모, 주변 입지조건, 공법의 특성

(2) 철거작업 시 구조체의 안전도

(3) 소음, 진동, 분진 등 주변 환경보전과 건설공해 예방

7) 철거작업계획 설계 반영사항

철거작업계획 설계는 다음 사항에 유의하여 안전하고 경제적인 공사시행이 되도록 설계도서에 표기한다.

(1) 철거 대상부위와 주변 입지조건 등을 사전 조사하여 공법의 선정, 작업의 안전 확보, 주변공해방지 등 공사계획 수립한다.

(2) 철거에 앞서 사전 조사하여 관련 제반법규에 따라 작업의 안전 확보, 주변공해 방지 등 건설재해를 예방한다.

(3) 사전조사 결과에 따라 각종 인허가 신청 및 승인절차를 확인한다.

(4) 철거작업에 앞서 구체적인 시행방법을 명시한 공사계획서를 작성한다.

(5) 구조체 철거 시에는 철거공사 중의 구조안전이 검토되어야 하며, 철거 시 구조안전을 위하여 임시 또는 영구보강이 필요한 경우에는 구조 설계도면 및 시방서를 작성하고 이에 따라 공사를 시행하여야 한다.

(6) 철거작업은 기존 건물의 손상을 최소화하고 안전시공이 되도록 관련 지침을 명기하여야 한다.

(7) 보수가 필요한 콘크리트 열화부위는 건전부위 직전까지 철거하는 것으로 한다. 단, 구조적 결함을 발생시키지 않도록 소형충격 및 진동공법으로 철거토록 하여야 하며, 필요시 가설 지지대를 설치하여 구조 안전성을 유지토록 설계한다.

Ⅲ		과업내용

3.1 조사 및 자료수집

1) 현장 조사

(1) 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

(2) 기타 조사사항 : 내진보강사업에 따라 주변 시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

2) 자료 조사 및 분석

(1) 발주처 제공 자료 분석

① 준공도면, 구조계산서(기존)

② 내진성능평가 보고서, 내진성능평가 검증보고서

③ (해당 시) 건물이력에 관한 도면(증개축, 보수보강)

④ (해당 시) 안전점검, 긴급안전점검, 정밀안전진단 등 보고서

⑤ (해당 시) 기타 유지관리 관련자료

(2) 계약상대자의 분석 및 검토

① 계약상대자는 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대하여 성실하게 조사․연구를 하여야 하며, 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 발주처에 요청하여 수령하거나, 현장조사를 통하여 취득하는 등, 필요한 조치를 취해야 한다.

3.2 내진보강설계

1) 일반공법 보강설계

성능기반평가법에 의한 내진성능평가 결과 내진성능을 만족하지 못하는 경우 일반공법을 적용한 보강설계를 실시한다.

(1) 일반공법이란 건축구조기준에서 규정하는 일반적인 재료의 설계방법을 사용하여 설계가 가능하면서 보편적으로 사용되어 내진성능과 설계절차가 검증된 공법을 의미한다.

(2) 계약상대자는 일반공법 중에서 경제적이고 내진성능 향상 효율이 좋은 적합한 보강방안을 제시한다.

(3) 일반공법을 적용하여 최적의 보강안이 결정되면 공사기간과 공사비를 제시한다.

(4) 이때 공사기간 및 공사비는 발주처와 일반공법 적용여부를 협의할 수준의 것으로 계약상대자는 유사 업무의 경험과 관련 사업분야의 일반에서 통용될 수 있는 자료에 근거하여 기간 및 공사비를 예측하고 제시하여야 한다.

(5) 우선적으로 제시된 일반공법의 적용여부는 발주처와의 협의로 결정한다. 계약상대자는 발주처 협의를 위한 자료를 제공해야 하며, 발주처의 요청이 있는 경우 발주처를 대상으로 일반공법 보강설계에 대한 설명회를 실시한다.

2) 특수공법 보강설계(필요 시)

추정 공사기간 및 공사비의 과다, 발주처 불만족 등의 사유로 일반공법의 사용이 어렵다고 판단되는 경우, 특수공법을 적용한 보강설계를 실시한다.

(1) 특수공법이란 건축구조기준에서 규정하는 일반적인 재료를 설계방법을 사용하여 설계하기 어렵거나, 동 기준에 근거가 제시되어 있지 않은 공법 또는 신재료를 사용하는 공법을 의미한다.

(2) 특수공법을 적용한 경우에는 그 공법 및 사용한 장치에 대한 검토·인증뿐만 아니라 기존 건물과의 접합부 등에 대한 면밀한 검토를 수행해야 한다.

(3) 특수공법을 적용한 경우에는 해당공법의 전문가로부터 보강설계 전 과정에 대하여 제3자 검토를 받아야 한다.

(4) 특수공법의 공학적 적절성은 최종적으로 발주처가 지정한 공법심의위원회의 심의를 통과해야 하며 계약상대자는 공법심의위원회 심의에 필요한 자료를 성실히 준비해야 하며, 요청이 있는 경우 심의를 위한 설명회에 참석하여 적용한 특수공법에 대해 정확히 설명해야 한다. 공법심의위원회의 개최를 위한 비용은 발주처가 부담한다.

(5) 공법심의위원회에서 추가적인 검토나 자료를 요청하는 경우 계약상대자는 이에 성실히 응해야 한다.

(6) 특수공법이 신기술 또는 특허 공법이라 하더라도, 특수공법을 적용한 보강설계에 대한 최종책임은 책임구조기술자에게 있다.

3) 기본설계도서 작성(구조설계)

(1) 적용공법이 결정되면 계약상대자는 이를 바탕으로 내진보강 기본설계도서를 작성한다.

(2) 기본설계도서는 적용공법에 대한 설명 및 보강 위치 및 개소, 보강부위 및 접합부에 대한 구조계산서·도면 등을 포함하는 것으로 실시설계(문화재 설계)를 위한 충분한 정보를 포함하고 있어야 한다.

(3) 확정된 내진보강설계를 반영하여 공사비를 산출한다. 공사비는 건축마감재를 포함한 복구비는 제외한다.

4) 구조 실시설계

(1) 문화재실측설계업자와 협의를 통하여 최종 보강위치를 결정하고, 이를 바탕으로 구조 실시설계를 실시한다.

(2) 구조설계 분야의 실시설계도면, 수량산출서, 시방서 등 보강공사 가능하도록 설계도서를 문화재실측설계업자와 협의하여 작성한다.

(3) 구조분야의 공사비 계산을 위하여 견적가격을 적용할 필요가 있는 경우에는 단가적용의 타당성과 적절성을 검토하여 단가대비표를 작성하여 건축설계 용역수행자에게 제공하여야 한다.

(4) 실시설계도서 작성 시에는 문화재실측설계업자와 긴밀히 협조하여 내진보강공사에 필요한 모든 도서가 제출되도록 하여야 한다.

5) 비구조요소의 내진보강설계

(1) 기존 구조물의 비구조요소로서 내진성능평가와 보강설계에서 구조요소로 사용된 경우에는 요구성능을 만족하기 위한 내진보강을 수행하여야 한다.

3.2 문화재(건축)설계 과업세부내용

1) 현장확인 및 구조 기본설계도서 검토

(1) 문화재(건축)설계의 용역수행자는 구조설계 용역수행자로부터 본 과업지시서에 따라 작성한 기본설계도서를 제출받아 문화재(건축)설계에 반영될 사항 등을 검토해야 한다.

(2) 주요 검토사항은 구조부와 마감부의 재료, 공법, 시공성 등이며 검토결과 문제점이 발견될 경우에는 구조설계 용역수행자와 협의하여야 한다.

(3) 문화재(건축)설계의 용역수행자는 현장을 방문하여 구조 기본설계도서상의 철거, 변경, 보강 부분에 대한 현장시공성 및 건축설계와의 관련성 등을 확인하고, 문제가 발견될 경우 구조설계 용역수행자와 협의하여야 한다.

2) 건축 실시설계

(1) 문화재(건축)설계를 수행하고 실시설계도면(건축분야), 설계내역서, 시방서(건축분야) 등 보강공사가 가능하도록 설계도서를 작성한다.

(2) 설계내역서는 내진보강공사에 필요한 전체 과업에 대한 것으로 구조분야의 수량산출서 등은 구조설계 용역수행자의 제출도서를 반영하는 것을 원칙으로 하되, 중복되거나 누락되는 항목이 없도록 상호 검토해야 한다.

(3) 실시설계도서 작성 시에는 구조설계 용역수행자와 긴밀히 협조하여 내진보강공사에 필요한 모든 도서가 제출되도록 하여야 한다.

(4) 실시설계 내용을 바탕으로 사업비(공사비)를 산출한다.

(5) 사업시행을 위하여 지자체 및 관련기관 등의 인·허가 협의 및 협의서류를 작성해야 하며, 사업의 원활한 수행을 위하여 설계용역의 법적·기술적 지원업무를 수행한다.

3.3 기술감리 협조사항(필요시)

본 용역의 책임구조기술자는 구조설계 이후에 실시되는 보강공사에서 책임자가 설계한 의도대로 정확히 시공되고 있는지를 확인하여야 한다.

1) 발주처가 특수공법 등으로 기술감리가 필요할 경우(별도 집행) 설계자로서의 기술감리 업무수행에 적극 협조해야 되며, 기술감리의 책임감리는 내진보강설계의 책임구조기술자가 맡는다. 직접 수행이 어려울 경우 발주처와의 협의 하에 대리인을 지정할 수 있고, 이때 대리인은 책임구조기술자와 동등한 기술수준을  갖춘 자로 한다.

2) 책임구조기술자는 내진보강설계용역 완료에도 내진보강공사가 실시되면 시기를 막론하고 기술감리에 대한 책임을 다하여야 한다.

3) 특수공법을 사용하는 경우 책임구조기술자가 그 공사의 전반에 대한 기술감리를 직접 수행하는 것을 원칙으로 한다.

4) 책임구조기술자는 설계 당시의 의도에 따라 적합하게 시공되고 있는지를 확인하여야 한다. 이를 위하여 시공자에게 제공받은 시공계획서를 검토하여 주요 공정에 대해서는 현장 확인을 실시하고, 설계 의도와 다르게 시공되거나 시공상에 문제가 있는 경우에는 반드시 감독관(발주처)에게 보고해야 한다.

제4장 성과품 작성

4.1 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

1) 예비검사

계약상대자는 설계용역 완수예정일 전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

2) 설계도서 작성기준

「건축물의 설계도서 작성기준」 및 「문화재수리 설계도서 작성기준」에 의거 작성한다.

3) 계약상대자는 모든 설계도서의 성과품 인쇄 및 제본은 발주처와 협의 후 실시한다.

4.2 내진보강설계(구조설계) 요약보고서 작성 기준

1) 일반사항

① 목표성능(지진위험도 포함): LS, IO 등

② 지반등급: Sa ~ Se

2) 재료강도: Mpa

① 콘크리트, 철근, 철골

3) 내진성능수준(X, Y 방향에 대한 보강 전·후 비교)

① 비선형해석에 대한 성능수준 명기

② 연직하중 분담율, 최대층간변형각

4) 기초보강에 대한 세부사항

① 형식/ 위치/ 수량: 예시)Micro Pile Φ150, Ⓐ-⑧열, 1본

② 성능기반 내진성능평가(m계수법, 비선형정적절차법, 비선형동적절차법 등) 시 지반조사(평판재하시험) 결과에 따라 허용지내력이 확보될 경우 기초보강 제외 가능여부를 기재할 것

5) 조적 채움벽

① 고려, 미고려 및 사유

6) 일반공법 보강설계 시 철골부재(SS, SM)의 종류, 용접부호 및 용접검사 방법 기재할 것

4.3 성과품의 작성

1) 설계도서 작성 기준

(1) 설계도서는 공사명, 목차, 설계설명서, 공사시방서, 내역서, 수량산출서, 설계도면, 현황사진첩을 포함하여 작성하며, 작성항목은 12) 기타의 (4)에 따른다.(p.31)

(2) 주변 환경과 수리대상에 대한 철저한 고증 및 현황조사*, 실측**에 근거한 설계도서를 작성하며, 각 작성항목은 아래 항목에 따른다.

(3) 문화재수리의 실측은 기본실측을 토대로 하며, 수리 범위 및 주요 부재 가운데 시공에 필요한 부분은 상세실측을 한다.

(4) 설계도서 작성 시 문화재유형별 유의사항과 관련지침***은 아래 항목에 따른다.

* 고증조사 및 현황조사 업무 항목

항목		조사 내용
고증조사	연혁조사	창건연혁 검토 및 분석
		보수연혁 검토 및 분석
	면담조사	거주자 및 관련자 면담, 건물 이력 확인
	재료 및 시공기법 조사	재료의 생산과 시공기법 조사
	재료생산 현황조사	현 재료의 생산여부, 유사 재료 생산여부, 단종 재료 생산 가능 여부 검토
현황조사	현지답사	지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건, 토지이용 현황 등 조사, 사진촬영, 현지답사 보고서 작성
	공사여건 조사	도로 및 차량진입 관계 조사, 특수재료의 공급처 및 단가 조사, 폐기물 처리방법 및 비용조사
	보수범위 조사	보수 대상 문화재의 현황조사(보수 정도 및 범위 재료 등), 문화재 훼손 원인 진단(육안조사, 촉진조사 등)
	구조물 조사	대상 지역 부근(공사로 인한 직간접적으로 구조물에 영향을 미치는 범위)의 기존 건물을 비롯한 각종 구조물 현황 조사
	법규 검토	제반법규(문화재보호법, 건축법, 도시계획법, 산림법, 농지법 등) 검토, 인허가 절차 파악
	지장물 조사	지상 시설물의 저촉여부 조사, 구조물 설치 개소 및 시공 상 저촉구간 위치 확인, 부속시설물(상하수도, 가스, 케이블 등) 조사, 지장 수목 조사
	상수도 및 하수도 조사	기존 자료 검토 및 현황 조사
	배수시설 조사	기존 자료 검토 및 현황 조사
	전기, 통신설비, 토목, 조경 등 조사	기존 자료 검토 및 현황 조사

** 실측 업무 항목

항목			조사 내용
근대건축물	기본실측	배치실측	방위, 주변 건축물조사, 도로, 지형, 고저차, 주변, 식재(지장물), 배수
		평면실측	기둥, 벽, 창문 등의 위치, 방(용도 및 마감), 복도, 계단, 주변현황(인접 구조물 관계)
		단면실측	중심선 치수, 안목 치수, 창호 및 개구부 위치, 층고 및 천장고
		입면실측	창호 및 개구부의 위치, 외부마감재료, 외벽시설물(사다리, 난간, 홈통 등), 굴뚝 및 옥상 돌출부 등
		지붕실측	지붕틀(트러스), 마루틀, 용마루, 처마끝, 박공널, 지붕골, 고정철물, 지붕물매, 처마길이 등
	상세실측	벽체실측	조적조쌓기, 벽체 마감(흙손, 물씻어내기, 뿜질 등), 고정철물, 몰딩 형상 및 규격
		지붕실측	평잇기, 기와가락잇기 표준규격, 고정철물, 마감부 규격
		계단실측	계단 폭·높이, 난간
		창호실측	규격, 결구, 벽체고정 방식, 창호 추함
		구조실측	트러스(결구, 고정철물, 가공)
		기타실측	실내의장(도배, 도장, 바닥재, 바닥 문양 등), 전기(전등, 스위치 등), 난방(벽난로, 굴뚝 등)

*** 문화재유형별 설계도서 작성 시 유의사항과 관련 지침

	설계도서 작성 시 유의사항과 관련 지침
공통사항	문화재유형별 설계도서 작성 시 해당 문화재수리 범위에 한하여 적용한다.
탑 · 석조물	1. 석조물의 비파괴진단, 물성조사 및 표면 열화상태 조사, 풍화·손상조사, 지반환경조사, 변위조사 등을 통해 수리 방안을 검토하여 설계도서에 반영한다. 2. 대상 석조물의 구조형식, 각 부재의 결합방식, 특이점, 균열·파손 등 결함사항을 조사하여 도면에 표현한다. 3. 배치도는 보수 대상 및 주변 일곽의 시설물, 수목 등을 조사하여 작성한다. 4. 상륜부, 문양(문비, 팔부신중 등), 기법(옥개석 지붕면곡, 앙곡, 기둥 흘림 등), 기타 특이사항 등에 대하여는 상세도면을 작성한다. 5. 석조물의 보존처리(세척)는 기본적으로 해체하지 않은 상태에서 조치하도록 하고, 기존 부재를 훼손시키지 않는 범위로 최소화하는 방안을 모색하여 설계도서에 표현한다. 6. 공사 시행 시 보존처리 범위와 재료 등 중요사항에 대해서는 자문을 받아 시행하도록 설계도서에 명시한다.
근대건축물	1. 보수 대상에 대한 고증 및 현황조사 내용을 참고하여 보수원인을 검토한 후 수리방안을 마련한다. 2. 건축기법 및 양식현황을 상세하게 조사·기록하여 시공 시 기준이 되도록 한다. 3. 변형 또는 변이된 현황을 파악하여 원형 및 원인을 밝히고, 관련 조사 내용을 설계도서에 반영한다. 4. 벽돌 등 건축재료, 도료, 미장 등에 대한 조사를 실시하여 사용된 재료를 파악·기록한다. 5. 건축물의 손상 및 성능(물리적·기능적) 저하현상 등을 정밀하게 조사하고, 필요할 경우 구조안전진단을 실시하여 구조안전성을 검토하여 설계에 반영한다. 6. 배치도는 보수대상 뿐만 아니라 주변 일곽의 관련 건축물, 수목 등을 측량하여 전체배치도를 작성 도시한다. 7. 건물 내·외부의 부위·부재별로 조사하여 정면, 좌·우측면, 배면(조사 가능한 면)과 내부의 평면·앙시·입면에 대한 도면 작성, 실측자료를 통해 종·횡단면도, 주요상세도를 작성한다. 8. 벽체의 내쌓기, 경사면, 연결부 등 현황 및 시공을 위한 상세도면을 작성한다.

(5) 설계도서는 공사 내용 파악이 용이하도록 간결하게 구성하되 그 내용은 상세하게 작성한다.

(6) 설계도서는 관련 법규 및 제반 규정을 준수하여 작성한다.

(7) 설계도서는 공사시방서, 내역서, 설계도면 간의 연계성을 고려하여 내용을 구성하고 상호 비교할 수 있도록 한다.

(8) 설계도서에 관람객 및 작업자의 안전을 위한 안전조치 사항을 반영하도록 한다.

(9) 수리공사 시 발생한 ‘재사용 불가능 부재’ 가운데 문화재로서의 특성과 기법이 반영된 주요 부재의 선정과 이전 장소는 발주처와 협의 후 결정하도록 하며, 이에 따른 부재선정, 운반 등 관련 사항을 설계도서에 반영한다.

(10) 문화재수리보고서 작성 및 발간, 제출 등에 관한 사항을 설계도서에 기술한다.

(11) 특수한 경우의 문화재 보수 시 가설 비계 또는 수리용 덧집을 설치하고, 그 규모는 공사규모, 내용, 중량물 취급정도에 따라 발주처와 상의 하에 결정하며, 아래의 사항을 고려하여 설계한다.

① 풍압 및 설 하중 등의 안전성, 작업의 편리성, 문화재 손상방지

② 해체 시 먼지가 날리지 않도록 분진망, 보호망 설치(도심에서는 집진설비 설치 고려)

(12) 가설건물은 각 공종에 맞추어 설치토록 하고 아래사항을 고려하여 반영한다.

① 가설사무소 : 식별용이, 출입 시 항상 거처갈 수 있는 위치 설치

② 자재적치장 : 반출입 용이. 우수 및 습기로부터 보호, 통풍 원할

③ 작업장 : 필요시 지붕 설치, 우수에 침수되지 않은 위치 설치

(13) 공사용 가설건물의 위치, 작업진입 동선, 관람객 유도 동선 등은 필요시 별도의 도면을 작성한다.

(14) 전기, 기계설비 등과 관련된 사항은 발주처와 협의하여 설계도서에 반영한다.

(15) 문화재안내판 설치 시 『(디자인과 안내문안에 관한) 문화재안내판 가이드라인』을 준수하고, 문화재의 보존·관리·활용 등을 위하여 설치하는 시설물은 「문화재 주변 시설물 등에 대한 공공디자인 지침」의 기준에 맞춰 설계도서에 반영한다.

(16) 문화재보수공사 실명제 시행에 따라 공사안내판에는 참여자(기능자 포함)를 기재한다.

2) 설계 설명서

(1) 설계설명서에는 공사개요, 연혁, 현황, 고증, 설계변경 조건 등의 내용을 명기하도록 한다.

(2) 공사 개요에는 공사명, 지정별, 소재지, 공사목적, 사업지침, 소요예산 등의 공사 기본사항과 기간, 규모, 물량, 자재현황, 자재원, 관급자재 등 공사 세부 내용을 포함하여 기술한다.

(3) 연혁에는 해당 문화재 창건 및 중건년도, 관련 인물, 전설 등의 관련 사항과 보수정비 이력(연도, 보수범위, 보수내용)을 기술한다.

(4) 환경, 지형, 면적, 배수관계, 건물배치 현황 등의 주변 현황과 보수대상 문화재의 구조, 보존상태, 수리 부위 및 원인 등의 보수대상 현황을 기술한다.

(5) 보수 및 복원설계 시 원형고증과 관련한 고증조사 내용을 상세히 기술한다.

(6) 설계변경 조건을 구체적으로 명기하도록 한다.

(7) 현장조사 결과, 내진성능평가 상세평가결과, 주요 사용재료 결정, 공법선정, 건축 구조계획을 기술한다.

3) 물량산출서

(1) 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

(2) 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출하여야 한다.

4) 설계도면

(1) 설계도면 작성

① 설계도면은 기본도면과 상세도면으로 작성한다.

② 기본도면은 표지, 도면목록표, 설계개요, 가설도, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 천장평면도(앙시도), 가구구조평면도, 지붕평면도(와복도)로 구성된다. 단, 문화재 유형에 따라 도면의 대상 및 범위를 조정하여 적용할 수 있다.

③ 상세도면은 부분도와 상세도로 구분한다. 부분도는 배치도, 평면도 등의 공사 범위를 확대하여 세부 내용을 표현토록 하고, 상세도면은 12)기타의 (4)에 따른다.(p.31)

④ 설계도면은 현황도면과 계획도면(보수·정비·복원)으로 구분하여 작성하고, 도면 배열 시 현황도면과 계획도면을 앞뒤로 배열하여 설계도면의 가독성을 높인다.

⑤ 설계도면의 분류체계에 의한 목록은 사업명, 도면명, 도면번호, 도면파일명에 일관성 있게 사용한다.

⑥ 필요 시 주변현황, 보수범위를 상세히 알 수 있는 부분배치도, 부분평면도, 부분입면도, 부분단면도를 작성한다.

⑦ 여러 공정이 복합된 문화재수리의 경우 하나의 도면에 도시하지 말고 공종별로 분리하여 작도하도록 한다.

⑧ 교체부재 표시, 수리 범위 표시는 해칭, 점선, 박스 등으로 다양하게 표현할 수 있으나 도면 파악이 용이하도록 공종별, 부위별로 구분하여 도시하고 범례를 활용한다.

⑨ 주요 부재(기둥, 대들보 등) 가운데 자연재를 사용한 경우 자연곡을 조사하여 상세도를 작성한다(서까래 제외)

(2) 설계도면 내용

- 도면의 숫자는 아라비아 숫자로 표기하고, 단위는 미터법을 사용하되 필요 시 영조척(營造尺)의 용척 및 척수를 병기

- 각종 부재의 명칭 기입

- 각종 부재의 품명, 규격, 형태, 표시

- 보수 및 교체가 필요한 부재의 수량과 범위 표시

- 해당 공사에 적용될 특기사항 등 설계도면 이해를 위한 주기(Note) 병기

- 부호, 방향, 축척(Scale), 찾음표(Key Plan) 등

- 지면고(G.L), 현황고, 계획고, 기울기 등 표시

- 건축, 토목, 기계설비, 전기 등 기타 부대설비 관련공사 별도 표시

- 기타 요구사항 명기

(3) 설계도면 표기방법

- 육안으로 확인 가능한 부분은 실선으로 표기하고 가려진 부분 또는 추정 부분은 파선(또는 점선)으로 표기함을 원칙으로 한다.

- 글꼴(Font)은 윈도우에서 지원하는 기본글꼴(굴림, 돋음, 바탕 등)을 사용하는 것을 기본으로 한다.

- 보수 및 교체 부위는 계획도면에 색상 또는 해치 등의 방법으로 별도 표기하되 하나의 설계도서 안에서는 유형별로 동일한 표기 방식으로 작도한다.

- 단면도 작성 시 단절된 부분의 구조만 그리지 말고 배경이 되는 입면을 병기하여 작성한다.

- 도면층(Layer)* 및 도면 표제란 구성기준**은 각각 아래 내용과 같다.

* 도면층(Layer) 기준(A3)

기준 명칭	색(Color No.)	굵기	설명	용도	선형태
CEN	빨강 (1)	0.05	중심선		1점쇄선
DIM	흰색 (7)	0.12	치수		실선
ELE1	초록 (3)	0.25	진한 입면선	기둥 / 창방 / 평방 / 대량 / 석축 / 용마루 / 내림마루	실선
ELE2	진홍 (6)	0.20	진한 입면선
ELE3	하늘 (4)	0.15	보통 입면선	창호 / 창호면 / 인방재 / 기와입면
ELE4	옅은주황(11)	0.10	보통 입면선
ELE5	옅은주황(13)	0.05	연한 입면선
SEC1	노랑 (2)	0.35	주 단면선	목재 단면, 기둥	실선
SEC2	초록 (3)	0.25	보조 단면선
SEC3	진홍 (6)	0.20	보통 입면선
SEC4	하늘 (4)	0.15	연한 입면선
SEC5	옅은주황(11)	0.10	연한 입면선
FIN	파랑 (5)	0.05	마감선		실선
HID	옅은회색 (9)	0.10	숨김		파선
HAT	회색 (8)	0.05	해치		실선
SOLD	연회색 (253)		솔리드해치		실선

** 도면 표제란 구성기준

표제란 구성요소		내 용	예 시
공 사 명 (프로젝트 명)		프로젝트 명칭 기재	○○궁 ○○루 보수정비공사
업 체 명		프로젝트를 수행하고 있는 업체 명칭 기재 컨소시엄인 경우 대표회사 또는 참여사 기재	○○종합건축사사무소
도 면 명		도면의 명칭 기재	○○루 1층 평면도
도면 정보	축척 Scale	다수의 축척이 포함된 경우 대표적인 축척 또는 복수의 축적 기재	1:200
	일자 Date	최종 승인된 날짜 기재	2012.08.27
	수정·변경 Revision	도면의 개정 날짜 및 내용 기재 개정 건별 기재	2012.06.19 건물 해체 시 드러난 결구부 수정
	도면번호 Drawing no.	도면 번호 기재	A01-001
	일련번호 Sheet no.	도면 출력 후 편철 관리의 편의를 위해 부여된 편철 번호(기재도면 번호는 별도)
도면 책임자	조사 Reserched by	도면 작성을 위한 실측 조사자 성명 기재
	설계 Designed by	도면 설계자 성명 기재
	제도 Drawn by	도면 작성자 기재
	검토 Checked by	도면 검토자 기재
	승인 Approved by	책임기술자 기재
주 기 NOTE		특기사항 기재

- 이 고시에 규정한 사항 외에 문화재수리 설계도면 작성에 필요한 사항은 지식경제부 기술표준원이 제정한 KS표준지침, (사)한국건축가협회의 건축도면 공동표준지침(V1.1)을 따른다.[KSA 0005 제도 통칙, KSF 1501 건축제도 통칙, KSF 1001 토목제도 통칙, KSE 0001 기계제도 통칙, 건축도면 공동표준지침(V1.1)].

(4) 설계도면의 제출

- 설계도면은 발주처가 제시하는 방법으로 작성하여 제출한다.

- 제출 시 출력본과 저장물, 저장방식은 발주처가 제시하는 기준에 따른다.

5) 공사시방서

(1) 공사시방서는 문화재청 제정 『문화재수리표준시방서』 내용을 준칙으로 작성하되, 공사의 특수상황, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 해당 문화재수리에 적합하도록 작성한다. 특기시방서는 「현판 제작 특기시방서 작성 지침」과 같이 해당 문화재수리에 있어서 특별히 정한 사안에 작성토록 한다.

(2) 『문화재수리표준시방서』에 기재되지 않은 사항에 대해서는 문화재청 관련 제 법규 및 국토부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 기타 관계 법령에 준한다.

(3) 『문화재수리표준시방서』와 해당 문화재에 적용된 기법·기술 등의 수리조건에 차이가 발생할 경우 문화재의 특성 및 지역여건 등을 감안하고 발주처와 협의를 거쳐 작성한다.

(4) 문화재유형별 공사시방서 작성 항목*은 아래와 같다.

* 문화재유형별 공사시방서 작성항목

	공사시방서 작성항목
개요	1. 문화재수리공사는 『문화재수리표준시방서』에 준하여 개별 문화재 특성에 맞게 공사시방서를 작성하여 시행한다. 2. 설계도서 작성 당시 조사가 어려운 가려진 부분 등은 수리공사 때 시공자가 확인하여 조치할 수 있도록 관련 사항을 상세히 명시한다. 3. 현장관리, 재료관리, 시공관리, 환경보호, 안전관리 및 화재예방 등의 항목은 대상 문화재의 특성에 따라 작성한다. 4. 공사대상 문화재의 조사 결과를 바탕으로 해당 문화재의 특징, 일반 및 특이사항이 시공결과에 반영될 수 있도록 작성한다. ※ 특기시방서 작성은 해당 문화재수리에 있어 특별한 사안에 한정토록 한다.
탑 · 석조물	1) 재료 - 재질, 강도, 석재 확보(채집허가, 구입) 2) 조사 - 지형조사 : 기초 및 지반 침하 조사(탄성파탐사, 전기 비저항탐사, GPR탐사 등), 주변 배수시설 조사 및 배수량 검토 등 - 사전조사 : 기법(굴림정도, 모접기 등) 및 재질 조사, 석재면 조각 조사(습탁, 건 탁, 실측), 풍화·손상조사(표면 열화상태 조사, 암석조사, 암석의 절 리 및 균열상태조사) 등 - 해체조사 : 석재 쌓기방식, 맞댄면 가공상태, 기초 및 지대석 확인, 석재의 파 손·붕괴·변형 원인파악 및 규명, 속채움 돌의 종류·형상·공법 등 3) 해체 - 해체 순서, 해체 시 유의사항, 해체재료의 보존관리 4) 시공 - 공종별 시공방법 및 시공 시 유의사항 : 기초공사, 석공사, 석조물공사, 기타공사 - 석재가공 : 혹두기, 정다듬, 도두락다듬, 잔다듬, 갈기 - 보존처리 방법 : 경화처리, 접착처리, 인공수지처리 등 - 석재가공/보존처리 시 유의사항 - 조립 및 쌓기 - 기타 특수공법 - 시공기록 및 관리 5) 공사 완료 - 준공검사, 준공사진 촬영, 수리공사보고서, 자료의 정리 및 제출, 자료 보존 - 현장정리, 공사사무소 폐쇄
근대건축물	1) 재료 - 보충재의 구입과 관리, 문양, 산지 검토 2) 조사 - 사전조사 : 현황 조사, 기초 및 지반 침하 조사, 변형 상태 및 원인조사 등 - 해체조사 : 건축구법조사(조적조-벽체쌓기법, 개구부 및 아치 쌓기법 등, 목조- 평보, ㅅ자보, 왕대공, 빗대공 등, 석조-벽체쌓기법, 고정철물 등), 기록조사(벽돌의 인각 등) 등 3) 해체 - 해체 순서, 해체 시 유의사항, 해체재료의 보존관리 4) 시공 - 공종별 시공방법 및 시공 시 유의사항 : 벽돌공사, 석공사, 목공사, 철근콘크리트공사, 지붕공사, 미장공사, 마감공사, 창호공사, 기타공사 - 수리범위별 시공방법 및 시공 시 유의사항 · 지붕 : 평잇기, 기와가락잇기 표준규격, 고정철물 규격, 도장 종류, 마감부 규격 등 · 트러스 : 맞춤과 이음, 고정철물 고정법, 목재 가공법 등 · 벽체 : 마감기법(흙손, 물씻어내기, 솔질, 뿜질 등), 모서리, 몰딩 형상 및 규격 · 창호 : 맞춤과 이음, 설치방법(벽체 고정), 창호 추함 등 · 설비 : 전기(전등, 스위치 등), 난방(벽난로, 굴뚝 등) · 실내의장 : 도배, 도장, 바닥재 등 - 보수보강 및 장식철물 지정 - 모형 및 시공상세도 작성 - 기타 특수공법 - 시공기록 및 관리 5) 공사 완료 - 준공검사, 준공사진 촬영, 수리공사보고서, 자료의 정리 및 제출, 자료 보존 - 현장정리, 공사사무소 폐쇄

(5) 공사시방서의 총칙에는 공사일반, 계획 및 관리(공사협의, 제출물, 공무행정서류), 재료관리, 품질관리, 안전·보건 및 환경관리, 가시설물(가설공급시설물, 임시가설시설물), 준공 등의 사항을 명기하도록 한다.

(6) 공사시방서에는 아래사항을 포함하여 기술한다.

① 해당 문화재수리 공정에 필요한 기법과 기술 등 시공에 관한 사항

② 해당 공종에 연계된 공종과의 관계, 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

③ 설계도면에 표시할 수 없는 공사의 범위, 정도, 과정, 규모 배치 등의 보완 사항

④ 해당 문화재수리에 필요한 시험, 검사 등에 관한 사항(필요 시 견본이나 견본시공에 관한 사항 포함)

⑤ 육안으로 파악하지 못한 가려진 부분에 대한 시공 시 유의사항(구조,이음,맞춤 등)

⑥ 부재 현황표(부재명, 재료, 규격, 가공기법, 총 수량, 교체수량 등)

⑦ 각종 소요자재 등의 운반, 채집 장소

(7) 공사시방서 작성 시 유의사항

- 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

- 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

- 표준양식을 사용하도록 하고, 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

- 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

- 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

- 사용자재는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.

- 시설물의 특성 또는 설계자의 설계의도 상 신기술, 신공법, 특허공법, 특허기술을 채택한 경우는, 동 기술이나 공법을 적용해야하는 타당성을 제시한 후 결정하여야 한다.

6) 공사내역서

(1) 공사내역서 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 기준으로 하되 발주처와 협의하여 적용하여야 하며 내역서 파일은 조달청 및 발주처가 요구하는 파일로 제출하여야 한다.

(2) 원가계산서, 총괄 설계내역, 공종별 설계내역, 내역서(예산서), 일위대가, 부표, 견적서 순으로 작성한다.

(3) 품명과 규격 등은 설계도면, 시방서, 설계내역서 간 상호 일치하여야 한다.

(4) 품이 할증되는 경우에는 근거자료를 제시한다.

(5) 원가계산서는 기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」 중 "원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙"에 준하여 작성한다.

(6) 공종집계표에는 공종별로 재료비, 노무비, 경비의 금액을 명기하며, 집계표와 내역서 상의 공종별 합계금액이 동일하도록 작성한다.

(7) 내역서(예산서)는 각 공사대상별, 공종별로 구분하여 작성한다.

(8) 일위대가에는 단가 인용 근거자료를 2개소 이상 명시(예:가격정보 ○○쪽, 견적서 등)하며, 복합단가로 구성된 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 1식으로 적용되는 단가에 대하여는 충분히 납득할 수 있는 자료를 첨부한다.

(9) 부표에는 자재구입 지역을 현실적으로 조사하여 적용하며, 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부한다.

(10) 견적서에서 규격화되어 있지 않은 품목의 가격이나 시중조사에서 알 수 없는 품목의 가격은 2개 이상의 전문 생산업체의 견적을 받아 정한다.

(11) 필요시 공사비에는 지장물 이설비등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(12) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

(13) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

(14) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

(15) 분야별 참고사항

① 재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

- 조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다.

② 직접노무비 : 대한건설협회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

③ 일정규모이상 공사에서 사용자재는 발주처가 직접구매(관급)토록 설계자는 관련사항을 설계도서에 표기하여야 한다. (관련: 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조 등)

④ 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 발주처와 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매)를 할수 없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 , 설계개요서, 설계설명서, 공사시방서, 설계내역서에 표기하여야한다.(관련: 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조)

④ 복합단가의 산출: 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

④ 운반비: 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

7) 수량산출서

(1) 수량산출서는 각 공사대상별, 공종별로 수량을 산출 집계한다.

(2) 수량의 계산, 재료의 할증, 단위수량 등은 『문화재수리 표준품셈』의 기준에 따라 산출한다.

(3) 『문화재수리표준품셈』에서 규정하지 않은 사항은 ‘건설공사 실적 공사비 적용 공종 및 단가’ 등 정부기관 준용 품셈, 기타 적산 참고자료를 기준으로 하고, 적용 근거를 명시한다.

(4) 공사내용에 따른 산출은 필요시 부위별 도면을 표기하여 산출방법을 알기 쉽게 작성한다.

(5) 교체부재의 위치, 규격, 개소, 수량 등을 명시하도록 한다.

8) 예정공정표 작성

예정공정표에는 해당 문화재수리공사의 주요 공종에 투입되는 작업량을 기입하며, 공기와 사업진도율을 제시한다.

9) 지장물 조서 및 인․허가 도서

(1) 지장물 조서 작성

지장물은 발주처와 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

(2) 인․허가 도서 작성

관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 용 도서를 작성한다.

(문화재 설계승인, 현상변경 절차 등)

10) 현황사진첩 작성

(1) 사진은 대상 문화재의 현황 파악이 가능하도록 선명하여야 한다.

(2) 외부사진은 일조상태를 고려하여 짙은 음영이 생기지 않도록 주의하여 촬영하고, 내부사진은 가능한 한 자연광을 이용하여 촬영하며, 부득이한 경우 반사판 및 간접조명을 사용한다.

(3) 전체를 파악하기 위한 원경, 전경, 근경 사진과 함께 수리 부위별로 상세 사진을 촬영한다.

(4) 원경 및 전경 사진의 경우 필요 시 연결사진(Panorama)을 촬영하며, 상세 사진은 보수 범위를 비롯하여 공포, 가구구조 등 건물의 특징을 나타내는 것은 전부 촬영한다.

(5) 사진의 각도와 시각은 설계도면과 연동될 수 있도록 정하여 촬영한다.

(6) 사진 크기는 "4×"6를 기본으로 하되, 기록 보존이 필요한 경우 발주처와 상의하여 크기를 결정한다.

(7) 디지털카메라로 촬영 시 1,000만 화소 이상, DSLR 기종의 카메라를 사용한다.

(8) 사진첩의 개별 사진은 고유번호를 부여하고 목록을 별도로 작성한다.

(9) 이동식 저장장치에 데이터 수록 시 디렉토리생성규칙, 파일명명규칙 등 데이터 제작에 관한 자세한 사항은 「문화재기록화사업 표준데이터 제작지침」을 따른다.

11) 설계도서 검토

(1) 검토 방법

- 설계시행 책임기술자가 검토

- 먼저 각종 계산서 확인 검토

- 확인된 계산서와 도면 일치 여부 검토

(2) 제출도면

검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도면 제출

12) 기타

(1) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 도면 등은 A3로 한다.

(2) 설계도서를 작성하는데 참여한 자 및 협력한 관계전문기술자는 관계법령 및 그 규정에 의한 명령이나 처분, 고증 등에 적합하게 작성되었는지를 확인한 후 해당 도서에 서명·날인한다.

(3) 기타 사항은 문화재수리에 관한 법률, 문화재수리 설계도서 작성기준, 건축공사표준시방서 등에 따른다.

(4) 설계도서 작성 항목

* 설계도서 작성항목

구분	작성 도서	작성 내용	축척
일반 사항	표지	․공사명칭, 공사구분, 작성년월, 설계사무소 명칭, 발주처 명칭
	목차	․일반사항, 설계설명서, 공사시방서, 예정공정표, 내역서, 수량산출서, 설계도면, 현황사진첩
설 계 설명서	개요	․공사명, 지정별, 소재지, 공사목적, 사업지침, 소요예산, 기간, 규모, 물량, 자재현황, 자재원, 관급자재 등
	연혁	․창건, 중건년도, 관련인물, 관련 전설 등 ․보수정비 이력(년도, 보수범위, 보수내용)
	현황	․주변현황 : 문화재 보존에 유·무형으로 영향을 줄 수 있는 환경, 지형, 배수관계, 경역 내 건물배치 현황, 관련 경역 면적 등 공사와 관계있는 지형, 등고, 토질, 수목생태 등 ․보수대상현황 : 보수대상물의 구조, 보존상태, 퇴락부위, 훼손부위, 퇴락원인, 변형부분 등
	고증	․보수, 복원 시 원형고증 관련 내용
	설계변경 조건	․설계변경 사유
공사시방서		․공사의 특수성, 지역 여건, 공사 방법 등 공사대상의 특징 및 특이사항(※ [별표4]에 별도 기준 제시)
특기시방서		․표준시방서에서 규정하지 않은 특기 사항
예정공정표		․공사 일정, 작업량 등의 시공 계획
내역서	원가계산서
	총괄 및 공종별 설계내역
	내역서 (예산서)
	일위대가
	자재표
	견적서	․공급자, 품명, 규격, 수량, 단가, 합계, 견적일자
수량산출서		․각 공종별 품명, 규격, 단위수량, 합계

구분			작성 도서	작성 내용	축척
설계도면	현황	기본도면	설계도면 표지	․공사명, 공사구분, 작성년월, 설계사무소명, 발주처	-
			도면목록표	․공사구분, 도면목차, 도면번호, 축척	-
			설계개요	․설계 및 공사개요, 대상 문화재 위치·면적·구조, 공사내용 및 수량 등, 공사시 유의 및 참고사항, 반영사항	-
			배치도	․문화재구역 전체 배치도 작성(필요시 보수대상 문화재 부분배치도 작성) ․건물·시설물·담장·석축·배수로 등 표기 ․방위표·등고선·진입로·인접도로·수목 현황 등 표기	1/200 ～ 1/500
			대지단면도 (종·횡단면)	․건물 및 시설물 위치, 고저	1/200 ～ 1/500
			평면도	․훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등	1/20 ～ 1/100
			입면도	․훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등, 기울기와 변위 표시 ․ㄱ·ㄴ·ㅁ자형 등 복합평면 건물은 각 방향 입면 작성(추녀마루 입면도 포함)	1/20 ～ 1/100
			단면도 (종·횡단)	․주단면도(종·횡단 2면 이상), 구조가 다른 부분 전부 작성 ․훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등, 기둥·벽체의 기울기와 처마 처짐 표시	1/20 ～ 1/100
			천장평면도 (앙시도)	․훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등	1/20～ 1/100
			가구구조평면도	․훼손 및 변형 상태, 마감상태 및 사용자재 등 (※ 상부구조에 반자가 있는 경우 천장을 다룬 천장평면도와 가구구조를 보여주는 가구구조평면도로 구분하여 작성)	1/20～ 1/100
			지붕평면도 (와복도)	․훼손 및 변형 상태, 사용기와 규격, 잇기겹수 등	1/20～ 1/100
		상세도면	부분도	․배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등에서 현황을 구체적으로 표시할 때	1/10～ 1/30
			상세도	․현황 부재 상세도 ․상세도 목록 : 지정 및 기초, 기단 입면·퇴물림·소맷돌 문양, 구들·고래·아궁이, 기둥 모접기·쌍사·배흘림, 머름, 난간, 보 단면, 초각 상세도(공포, 보머리, 화반, 대공, 추녀머리, 게눈각 등), 창호, 안허리곡·앙곡, 마루곡, 합각벽, 장식기와 문양, 철물, 결구 등	1/5～ 1/20
	계획	기본도면	배치도	․건물·시설물·담장·석축·배수로 등 표기 ․방위표·등고선·진입로·인접도로·수목 현황 등 표기 ․가설울타리·사무소·작업장·창고 등 가설위치, 자재 적치장소, 소화시설 비치장소 표기 ․작업진입로(차량, 인부), 관람객 유도 동선	1/200～ 1/500
설계도면	계획	기본도면	대지단면도 (종·횡단)	․건물 및 시설물 위치, 현황 고저 ․지반 정비 시 변경 대지의 고저	1/200～ 1/500
			평면도	․보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 교체수량 등(필요시 범례표 작성)	1/20～ 1/100
			입면도	․보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 교체수량 등(필요시 범례표 작성) ․ㄱ·ㄴ·ㅁ자형 등 복합평면 건물은 각 방향 입면 작성(추녀마루 입면도 포함)	1/20～ 1/100
			단면도 (종·횡단)	․보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 구들·굴뚝 단면, 교체수량 등(필요시 범례표 작성)	1/20～ 1/100
			천장평면도 (앙시도)	․보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법, 교체수량 등(필요시 범례표 작성)	1/20～ 1/100
			가구구조평면도	․보수범위, 마감 및 사용자재, 규격 및 치수, 결구 기법 , 교체수량 등(필요시 범례표 작성)	1/20～ 1/100
			지붕평면도 (와복도)	․보수범위, 마감 및 사용자재, 사용기와 규격, 잇기겹수, 교체수량 등 (필요시 범례표 작성)	1/20 ～ 1/100
			가설도	․가설덧집, 가설비계, 가설울타리, 가설사무실, 가설창고, 가설작업장, 공사안내판, 안전수칙판	1/100～ 1/200
		상세도면	부분도	․배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등에서 계획을 구체적으로 표시할 때	1/10～ 1/30
			상세도	․계획 부재 및 시공 상세도	1/5～ 1/20
	기타도면		기계설비도면	․급배수, 도시가스, 소화설비 등 관련 도면	-
			전기 및 통신도면	․인입배치도, 계통도, 조명·방범·통신 등 설비도, 피뢰침 상세도 등 관련 도면	-
			토목도면	․포장, 보도블럭 및 측구, 우·오수 등 관련 도면	-
현황사진첩				․대상 문화재 및 주변의 원경, 전경, 근경, 상세사진

※ 본 표 중 설계도면은 문화재수리 설계 시 수행되는 일반적인 항목(목조건축물 기준)을 규정한 것으로 문화재 및 수리공사의 유형에 따라 도면의 종류 및 축척을 달리 적용할 수 있다.

4.4 성과품의 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 최종성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

2) 성과품의 종류 및 납품부수(해당 없는 경우 부분적으로 제외할 수 있음)

종 류	규 격	납품부수	비 고
일반사항	A3	3	※내진보강공사로 인하여 포함되는 기계설비, 전기, 통신분야의 설계도서 포함
설계설명서	A3	5
시방서(공사시방서, 특기시방서)	A4	각5
예정공정표	A4	5
내역서(원가계산서, 내역서, 일위대가, 자재표, 견적서)	A4	각5
수량산출서	A4	5
설계도면	A3	5
기타 도면(전기, 통신 등 필요시)	A3	5
관계기관 협의 및 건축승인 등 인허가 자료	A3반책	소요량
※ 설계 용역자는 과업준공 시 상기와 같이 성과품을 납품하되, 이와 별도로 설계도서와 함께 모든 과업 성과품은 전자저장매체(CD-ROM 또는 USB 등 충분한 용량확보) 1개에 일괄 저장하여 동 저장매체 3조를 아래기준에 의거 제출하여야 한다. ㅇ 설계도면은 도면목록화일 및 한글폰트화일이 포함되어야 한다. ㅇ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함)는 발주처와 조달청이 요구하는 파일로 제출한다.