과 업 지 시 서
“‘광화시대’다중 전시체험 거점구축 공사 감리용역”

2021. 7.

Ⅰ. 사업 설명

1. 사업 개요

가. 용역명 : ‘광화시대’다중 전시체험 거점구축 공사 감리용역

나. 사업목적

- ‘광화시대’다중 전시체험 거점 2개소 구축 공사 시 관계규정에 따라 효율적인 공정관리, 정교한 품질관리, 철저한 안전관리 등 종합 검토를 통해 사업기간 내에 최적 품질의 결과물을 도출할 수 있도록 감리 이행

다. 용역기간 : 계약체결일로부터 2022. 1. 31.까지 (약 6개월)

라. 추정예산 : 금이억이천이십만원 정 (금220,200,000원 / 부가세 포함)

2. 사업 내용

가. 감리대상 사업

구분	사 업 명	공사기간	공사위치	공사면적	공사금액
거점1	‘광화시대’ 실감 미디어파크 조성 LED 디스플레이 구매‧제작‧설치 (광화원 거점구축)	21년 6월 ~ 9월 (4개월 내외)	서울시 종로구 사직로 130 경복궁역사 내 서울메트로미술관 2관	(실내) 약 457㎡	35억원 내외
거점2	‘광화시대’ 옥외 디지털 사이니지 LED 디스플레이 구매‧제작‧설치 (광화벽화 거점구축)	21년 7월 ~ 12월 (6개월 내외)	서울시 종로구 세종대로 198 대한민국역사박물관 외벽	(실외) 약 937㎡	70억원 내외

※ 감리 대상사업은 나라장터(www.g2b.go.kr)에 사업명으로 검색 후 제안요청서, 시방서 등 참조

※ 공사(구축) 기간은 사업일정에 따라 조정될 수 있음

나. ‘광화시대' 다중 전시체험 거점구축 사업개요

- [거점 1] ‘광화시대’실감 미디어파크 조성 (광화원)

유형

사업내용

[광화원] 5G 기반 실시간 스트리밍

실감 미디어파크

조성

ㅇ 시설조성

- 경복궁 역사 서울메트로미술관(2관) 내 시민을 위한 휴식과 명상의 공간을 제공할 수 있는 실감형 미디어 파크 조성 디자인 및 LED 디스플레이 설치

- 설치 후 디스플레이 작동 시연(구조설비/전기 등 구축)

- 콘텐츠 체험객 동선확보, 조명/공간/소방설비 등 구축

ㅇ 운영 및 관리

- 시범 운영(2개월), 유지관리 및 하자보수 등

ㅇ 필수 고려사항

- 전기·소방·시설물 안전 관련 법령 및 서울교통공사 운영관련규정 준수 필수

- 관람객 체험 환경을 고려한 관람 동선 계획 수립

- 콘텐츠 구현에 최적화 된 구조설비/전기/통신(망) 구축

- LED 방식의 장비 구축을 기본으로 하되, 제안사의 컨셉에 따라 다양항 형태의 디스플레이 및 프로젝터 방식 추가 가능

- 구현 콘셉트의 예상 면적은 약 700㎡ 이며, 미디어 및 공간 디자인을 활용하여 구성

- 플렉서블 디스플레이, 반투명 LED, 초고해상도 LED 등의 디스플레이 활용 가능

* 시스템 설치 시, 전파법의 인체보호 기준을 준수하여 설치

※ HW 최소 권장사항 : 영상, 이미지, 실시간 방송, 텍스트 표출 등 멀티채널 입력 소스 지원 가능해야하며, 다양한 형태의 디스플레이를 설치 사용하는 방안으로 변경 제안 가능

분 류	내 용
영상장비	LED	2.5mm 피치 이하 / 800 니트 이상 / 설치 구간 별 8K급 이상의 해상도를 표현할 수 있어야 함 * 최소 400m2를 LED로 설치해야 하며, 배치 방식은 자유롭게 가능 (단, 고정된 형태일 것)

* LED 활용 시, 전체 수량의 예비품 5%이상 확보하여 문제 시 대응

* 전력 : 80kw 이상 사용 시, 변압기 증설 계획 수립 필요

※ (거점1) 서울메트로미술관 2관 평면도

* ((2관) 138평, 457.1㎡ (가로35m x 폭13.06m) x 높이2.5m ~ 4.6m

※ (거점1) 서울메트로미술관 2관 공간개념도

*폭 13.06m 중 보행자 통로 3m 이상 확보 필수

- [거점 2] ‘광화시대’옥외 디지털 사이니지 구축 (광화벽화)

유형	사업내용
[광화벽화] 5G 기반 초대형 인터랙티브 미디어아트	ㅇ 설비구축 - 대한민국역사박물관 외벽에 실감콘텐츠를 표출할 디지털 사이니지 구축 설계 및 LED 디스플레이 구매, 설치(안전진단, 건축 상세, 구조, 전기, 기계, 소방 등) ㅇ 운영 및 관리 - 설치 후 디스플레이 작동 시연(운영매뉴얼 제작, 운영교육 포함) - 품질관리, 유지보수 등 ㅇ 필수 고려사항 - 건축·전기·통신·소방·기계·조명 등 관련 분야에 대한 법규를 면밀히 검토하여 누락사항이 발생하지 않도록 함 - 건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법, 전기통신기본법, 전기통신설비의 기술기준, 옥외광고물법, 빛공해 방지를 위한 광고조명 설치‧관리 권고기준 등 - 관할 자치구의 ‘옥외광고물 표시 허가 및 안전점검’신청 등 각종 허가절차 수행 - 오토 디밍제어 시스템을 통한 빛공해 방지 및 관련 규정 준수 - 빛공해 방지를 위한 광고조명 설치 ‧ 관리 권고기준, 인공조명에 의한 빛공해 방지법, 서울시 조례(빛공해 방지 관련 사항 등) 등 - 시간별/주변환경(우천 및 일식 등)에 따른 자동/수동 휘도 조절기능 내장으로 눈부심 최소화 - 불쾌한 적색류 또는 교통신호와 비슷한 색감의 콘텐츠가 포함되었을 경우 자동제어시스템을 통해 채도 조절 - 콘텐츠 구현에 최적화 된 구조설비/전기/통신(망) 구축 * 시스템 설치 시, 전파법의 인체보호 기준을 준수하여 설치

구분	사양/내용	구분	사양/내용
외관크기	가로90.244m×세로10.38m (곡면R값)1,533mm (정면)60.96m×10.38m (측면)29.284m×10.38m	해상도	가로8,928×세로992 화소 (정면)5,952×992 (곡면)288×992 (측면)2,688×992
표시면크기	가로89.28m×세로9.92m
소자간격	10mm	돌출폭	최대 1.1m 이내
설치위치	4~6층 벽면 (지상 4층 바닥 + 10.38m 높이)	설치방법	건물 벽면 설치
휘도	최대 8,000cd/㎡	외장마감재	1.6T 전기아연도금(EGI)패널
광고물 재질	Full Color LED 디스플레이	광고물 하중	약 90ton
광고물 구조	Unit Case 및 철골구조	소비전력	(최대) 900KW, (최소) 540KW

※ 서울시 옥외광고심의 통과(`21.3.10, 원안가결)

※ 서울시 심의 이후, 관할 자치구인 종로구청 허가신청 및 승인 과정에서 사이니지 크기 일부 축소 조정

대한민국역사박물관(현재)	구축 예시-1(측면)

- ‘광화시대’다중 전시체험 거점구축 추진일정(안)

구분	수행단계	2021
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
광화원	기획․설계	●
	물품구매		●
	기초공사		●	●
	설치공사			●	●
	시범운영				●	●
	결과보고					●	●
광화벽화	인허가		●
	기획․설계		●
	물품구매			●
	기초공사			●	●	●
	설치공사					●	●
	시범운영						●	●
	결과보고							●

다. 감리 과업범위

- ‘광화시대’다중 전시체험 거점 2개소 공사 및 전력시설물 구축 감리

·건축, 기계분야 공사감리

·전기검사, 소방검사 등 공사에 따른 안전검사

·설치물(장비)의 설치, 가동, 안전 확인

·기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항 등

라. 감리수행기준

- 감리를 수행함에 있어 본 공사의 관련 법규, 시방서, 제안요청서, 설계도서, KS규정집 등을 충분히 숙지하고 각종 시방서 및 법령, 규정 등 관계법령에 저촉되지 않도록 감리업무를 철저히 수행하여야 한다.

·건축법 제25조, 동법 시행령 제19조, 시행규칙 제19조의2 감리업무

·건설산업기본법 제40조, 동법 시행령 제35조, 건설기술 진흥법 시행령 4조에 따른 건설기술인 배치

·국토교통부 고시 제2020-1011호 「건축공사 감리세부기준」

·소방시설공사업법 시행령 제10조

·전력기술관리법 시행령 제20조

·정보통신공사업법 시행령 제8조

·산업통상자원부 고시 제2018-198호 「전력시설물 공사감리업무 수행지침」

·(건설공사 하도급대금 지급관련) 건설산업기본법 제34조, 기획재정부 고시 예산 및 기금운용계획 집행지침, 전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법

·건설산업기본법, 건설폐기물 재활용촉진에 관한 법률, 산업안전보건법, 공공기관 안전관리 지침 등 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정 등

마. 감리자 배치(안)

- 건축(1명, 상주), 기계․전기․통신․소방(각 1명, 비상주)

※ 공사기간 동안 건축사 1인이 총괄관리자로서 상주 감리하고, 각 분야별 전문 기술사를 통해 필요한 안전검사를 진행해야 함

※ 건축사의 경우, 고급기술사 이상의 자격을 보유하고 있어야 하며, 건축사보 추가 배치 가능

- 감리용역 인원배치계획표(안) 참고

Ⅱ. 과업 내용

1. 감리 세부내용

가. 기본업무

1) 설계도서, 시방서, 공사여건(현장조사), 착공신고서, 상세시공도면 검토

2) 착공 시 설계도서 및 시방서에 따라 적합하게 시공하는지 여부 확인

3) 공정관리 : 공정계획 및 공정표 검토, 공사 준비사항 사전점검, 공사관리

4) 시공관리 : 시공지도‧확인, 주요공종 입회, 현장기록

5) 품질관리 : 사용자재의 규격 및 품질 적합성 검토, 최종 납품내역 검토

6) 안전관리 : 재해예방 및 안전관리에 대한 사전검토‧실시확인, 기록유지, 사고처리 등

7) 설계변경의 기술검토

8) 준공도서 검토

9) 하도급 타당성 검토

10) 기록관리 : 다음 각호의 서류 및 도표를 작성 비치하여 항시 열람할 수 있도록 하고, 준공 후 발주처에 인계하여야 한다. 단, 하단 서류 중 과업 특성 상 불필요한 것은 발주처 승인 후 인계를 제외할 수 있다.

① 공사 감리일지

② 명령부 및 지시부

③ 회의록

④ 주요자재(관급자재 포함) 수불부 및 검사부

⑤ 매몰부분 및 구조물 검측대장, 사진

⑥ 공정표 및 공정보고서

⑦ 시공일지

⑧ 시공자의 안전관리 제반실적(안전관리교육 등), 안전관리비 사용실적 관계서류

⑨ 공사 진척 현황에 대한 사진첩

⑩ 계약 및 기성관련 서류

⑪ 각종 정기보고서

⑫ 기타 필요한 서류 및 도표

11) 안전점검

12) 기타 공사감리 업무추진에 필요한 지원업무

나. 감리자 배치

1) 감리자는 현장대리인 또는 기술자 등의 경력에 대하여 경력사항을 검토하여 이중등록이 확인된 때 또는 공정관리능력과 업무수행능력상 부적당하다고 인정될 때에는 공사감독관과 협의하여 시공자로 하여금 이들을 교체하도록 지시한다. 다만 현장대리인의 교체를 명하는 경우에는 사전에 발주처에 보고하여 승인을 득한 후 시행하도록 한다.

2) 감리자는 다음 감리원을 배치하여야 하며, 감리원이 공사현장의 공종 및 공사성격에 적합하지 아니하다고 인정되는 때에는 감리원의 변경을 요청할 수 있으며, 요청을 받은 감리자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

① 건축사 : 1명 상주 (고급 이상)

② 기계‧전기‧통신‧소방 분야 기술자 : 분야별 1명 비상주, 주2회 이상

3) 감리자는 착공신고 시 제출한 감리원의 배치계획에 따라 배치하여야 하며, 퇴직, 질병 등의 부득이한 사유로 인하여 당초 배치계획과 달리 감리원을 변경하고자 할 경우에는 발주처의 사전승인을 얻어 교체하되 분야별 배치계획상의 기술자와 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을 갖춘 자를 배치하여야 한다.

다. 일반사항

1) 공사 감리업무는 관계 법령이 정하는 바에 의하여 공사계획이 적정하게 설계되었는지의 검토하고, 설계도서의 내용대로 적절하게 시공되는지의 여부를 확인한다. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 건축법, 국토교통부 건축공사 감리세부기준 등 관계 법령 및 규정에 따른다.

① 부실시공 방지 세부실천계획 수립 및 이행

- 감리자는 시공자와 협의하여 공사에서 발생될 수 있는 부실공사 요인을 도출하고 방지 대책을 수립하여야 한다.

② 설계도서 및 착공신고서 검토내용 보고

- 감리자는 설계도면, 시방서, 산출내역서(물품내역서), 공사계약서 등의 계약내용과 본 공사의 설계보고서 등의 내용을 숙지한다.

- 감리자는 설계서 등의 공사계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장실정과의 부합 여부 등 현장시공에 주안점을 두어 해당공종 시행 전에 검토해야한다.

- 감리자는 검토결과 불합리(착오, 누락, 불명확)하거나 의문사항이 있을 시 그 내용과 의견을 진흥원에 보고하여야 한다.

③ 현장 내 발생되는 문제점 검토

- 감리자는 감리대상 공사구간에 대하여 수시로 현장을 순찰하고 공사장 관리를 철저히 하여 장래 공사시행에 문제가 발생되지 않도록 한다.

- 공사시행 중 발생되는 기술적인 검토사항과 문제점에 대하여 대안을 수립 보고하여야 한다.

2) 다음사항에 대하여 사전에 진흥원과 협의하여 그 과업을 수행해야 한다.

① 공사시행과정에서 구조, 기능상 중요한 설계변경이 필요한 경우 그 사유와 의견을 첨부하여 서면보고하고 진흥원 승인을 득한 후 시공조치토록 함

② 관계기관과의 협의사항  ※ 관계기관 : 서울교통공사, 대한민국역사박물관 등

③ 기타 진흥원이 지시하거나 감리자가 진흥원의 사전승인이 필요하다고
판단한 사항

3) 감리자는 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 반드시 직접 참관하여 시공 당시 상세한 현장기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하고 진흥원의 요구가 있을 때에는 이를 제시하여야 한다.

4) 감리자는 시공자가 도급받은 건설공사를 건설산업기본법 및 공사계약일반조건 규정에 따라 하도급하고자 진흥원에 통지하거나, 동의 또는 승낙을 요청하는 사항에 대해서는 적정성여부를 검토하여 요청받은 날로부터 7일 이내에 그 의견을 제출하여야 한다.

5) 감리업무와 관련하여 공사시공 및 준공 후 감리업무의 불합리로 발생되는 하자로 인하여 발주처에 피해가 있을 시 또는 감리자의 의무와 필요한 조치를 이행하지 않음으로서 발생되는 제반사항에 대하여 민, 형사상의 책임을 진다.

라. 공사 착수 전 업무내용

1) 설계도서, 시방서, 구조계산서, 물량내역서 이상 유무를 검토하고 이를 숙지하여 착공과 동시에 시공자로 하여금 설계도서와 실제 현장의 이상 유무를 확인토록 하여야 한다.

2) 발주처에서 제공한 제안요청서 및 시방서와 시공자가 납품 예정인 물량내역서 상호간 불일치한 사항 등을 사전 검토하고, 필요 시 시공자가 수정 및 보완하도록 지도한다.

3) 현장조사 결과 시공자의 설계내용에 변경이 필요한 경우에는 시공자와 협의 후 의견서를 첨부하여 진흥원에 제출하여야 한다.

4) 공사 착공 7일 이내에 설계도서의 시공성 등에 대한 적정여부 및 물량오류, 상세도면 누락 등 설계도서 검토내용을 진흥원에 제출하여야 하며, 검토내용에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

① 현장조건에 부합여부

② 시공의 실제 가능여부

③ 타 사업 또는 타 공정과의 상호 부합여부

④ 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등 내용의 상호 일치여부

⑤ 설계서에 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재여부

⑥ 진흥원에서 제공한 공종별 목적물의 물량내역서와 시공자가 제출한 산출내역서 수량과의 일치 여부

⑦ 시공 시 예상되는 문제점

⑧ 설계 및 시공계획 상에 관계기관 협의내용 반영 여부

5) 시공자가 제시한 시공계획, 공정관리계획, 안전관리계획, 하도급계획의 적합성 등을 검토한다.

마. 공사 시행 시 업무내용

1) 공정관리

- 주요 공종별, 단계별로 시공 규격 및 수량이 설계도서의 내용과 일치하는지를 검사ㆍ확인하여 이상이 없는 경우에 한하여 다음 공정에 착수하게 한다. 각종 검사와 관련 시정사항이 있을 때에는 시정사항을 기록, 보고하고 즉시 시공자로 하여금 재시공토록 하여 그 결과를 재확인 후에 다음 공정을 착수하게 한다.

- 주별 공정관리를 시공자와 협의하여 매주 제출하여야 한다.

- 시공자로 하여금 공정관리 계획을 수립하여 공정계획에 따라 공사를 추진하도록 감독하고 공사 진행에 차질이 있다고 판단되는 경우에는 시공자로부터 그 원인과 대책을 제출받아 검토하여야 한다. (부진공정 만회계획서, 수정공정표 등 작성‧제출 검토 후 발주처에 의견서 제출)

- 부실공사 시 구조적 안정성이 문제되는 중요공정의 검사결과는 해당공정의 공사가 종료되는 즉시 감리자가 서명한 후 문서화하여 기록을 유지하여야 한다.

2) 시공관리

- 시방서, 설계도서, 계약서, 예정공정표, 품질시험계획서 및 도급내역서 등에 의하여 자재 등의 품질 및 시공을 확인하고, 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 이를 발주처에 보고하고 재시공 지시 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 시공자가 이를 따르지 아니하거나 공사에 중대한 결함이 발생할 우려가 있다고 인정하는 경우 감독관의 지시를 받아 공사를 중단하게 하고, 발주처에 보고하도록 한다.

- 정기적으로 시공자의 공사일지를 확인하여야 한다.

- 주요 공종에 대하여 시공자로 하여금 공사 시공 전에 시공 상세도를 작성 제출토록하고 제출된 시공 상세도면을 검토‧확인하여야 한다.

- 주요 공종의 검사, 확인 결과는 해당공종의 공사가 종료되는 즉시 시공자로부터 제출받아 문서화하여 기록을 유지하여야 한다.

- 제출된 공사일지의 공종을 바탕으로 주요공종의 입회 및 시공 후 매몰되거나 사후 검사가 곤란한 구조물은 반드시 현장에 입회하여 지도‧감리하고 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 전경 또는 근접하여 사진을 촬영하고 상세한 기록을 비치하며 관리상의 주의점 등을 인계토록 하여야 한다.

- 건설공사의 품질확보를 위하여 시공자 품질관리계획서에 의거 품질관리가 요구되는 주요 공종의 시공과정에 입회‧확인하여야 한다.

- 현장노무자의 출역사항 및 장비투입현황을 기록‧비치한다.

- 시공자로 하여금 현장종사 직원 및 기능공의 견실시공의식을 고취하기 위하여 현장정기교육을 실시하게 하고 그 내용을 기록‧비치하여야 한다.

3) 품질관리

- 시공자에게 자재선정에 관한 사항을 제출하게하며 이에 대한 적합성여부(규격, 품질, 색상 등)를 검토 확인한다.

- KS 표시품을 우선 사용하도록 지도‧감독하되 KS가 없는 품목은 설계도서에 명시된 동등 이상의 품질을 사용하도록 하여 공사의 품질이 확보되도록 한다.

4) 자재관리

- 공사현장에 반입된 검수자재 또는 시험합격재료는 공사현장 밖으로 반출하지 못하도록 하고, 불합격된 자재는 시공자로 하여금 지체 없이 공사현장 밖으로 반출하게 한다.

- 관급자재에 대하여는 시공자로 하여금 적정하게 보관, 사용하게 하고, 그 사용내역을 보고 받아 관급자재 수불부에 기록하여야 한다.

5) 안전관리

- 시공자로부터 안전관리계획, 재해예방대책 등을 받아 계획대로 시행하는지 여부를 확인하여야 한다. (월 2회 이상 정기적인 안전관리 교육을 실시하도록 지도, 산업안전보건관리비 사용 및 계상기준에 의거 시공자의 월간 안전관리비 사용실적 확인)

- 산업안전보건법, 공공기관 안전관리지침 등 기타 관계법령에 적합하게 준수, 이행할 수 있도록 지도‧확인 하여야 한다.

- 공사로 인하여 대기, 수질오염, 악취, 분진, 소음 또는 진동 등 환경오염이 발생되지 않도록 지도ㆍ확인 하여야 한다.

4) 공사현장관리

- 공사현장 주변을 시공자로 하여금 항상 정리정돈 하도록 지도하여야 한다.

- 공사장 주변 위험요소를 사전에 조치하여야 한다.

- 현장에서 안전사고가 발생하였을 경우 시공자에게 필요한 응급조치를 취하도록 하고 발주처에 즉시 보고한다.

- 현장에서 다음 사태가 발생한 경우에는 필요한 응급조치를 취한 후 시공자에게 상세한 경위를 보고하도록 한다.

가) 천재 또는 기타의 사유로 공사현장에 피해가 발생하거나 이로 인하여 장시간 시공이 불가능한 때

나) 시공자 또는 현장대리인이 계속하여 현장에 상주하지 않은 때

다) 시공자가 정당한 사유 없이 공사를 중단한 때

라) 시공자가 불성실하게 공사를 시행하거나 정당한 지시에 응하지 않은 때

5) 검사 및 조치

- 작업 진행 중 시공여부를 확인하기 위하여 감리자는 정기적으로 공사 현장에 출입하면서 주요공정의 시공 상태를 점검하여야 한다.

- 수시 검사 시 시정사항은 구두 또는 서면으로 할 수 있으며, 그 내용은 감리일지에 기록유지하고, 차후 시정결과를 확인하여야 하며, 감독관에게 보고하여야 한다.

- 시공자가 제출하는 기성검사원, 설계 변경원, 준공검사 등 각종검사 신청이 있을 경우에는 설계도서, 공정율 및 품질관리기준 등에 따라 적합하게 시공되었는지 여부에 대한 사항을 확인한 후 감리의견서를 첨부하여야 한다.

- 공사 시행과정에서 설계변경사유가 발생한 경우에는 그 사유와 의견을
첨부하여 발주처에 보고하여야 한다.

- 설계도서와 상이한 시공을 하거나 규격에 맞지 아니하는 자재를 사용할 때는 즉시 시공자에게 시정을 요구함과 동시에 발주처에 보고하여야 한다.

바. 공사 준공 시 업무내용

1) 예비준공검사

- 감리자는 준공이전에 준공기한 내 준공 가능여부 및 미진 사항의 사전 보완을 위해 예비준공검사(각종 설비의 시운전 및 성능시험 포함)를 실시하고 시공자에게 보완 지시 후 그 결과를 진흥원에 보고하여야 한다.

- 진흥원은 예비준공검사 결과 미진한 사항을 준공검사 전까지 보완토록 감리자에게 지시할 수 있다.

- 건축협의(필요시) 시 의제처리 또는 관계기관(부서) 협의조건을 이행했는지 여부를 검토하고, 각종 필증을 구비하여 준공이 원활히 처리되도록 조치한다.

2) 공사가 완료되었을 경우에는 준공검사를 실시하기 전에 공사현장을 면밀히 확인ㆍ점검하여 지적사항이 있을 경우에는 진흥원에 그 내용을 보고하고 즉시 시공자로 하여금 보완 시공 또는 재시공토록 하며 완료된 후 준공검사를 신청하도록 하여야 한다.

3) 시공자가 제출한 공정보고와 시행공정이 부합되는지의 여부를 검토ㆍ확인하여야 한다.

4) 당해 공사완료 후 준공검사 전 사전 시운전 등이 필요한 부분에 대하여는 시공자로 하여금 시운전을 위한 계획을 수립토록 하고 이를 검토하여 진흥원에 제출하여야 한다.

5) 시공자가 제출한 준공검사원 및 준공보고서, 정산설계도서 등 일체의 관련 서류를 검토ㆍ확인하고 공사목적물이 계약대로 공사가 완료 되었는지 여부를 확인하고 준공조서를 첨부하여 진흥원에 제출되도록 함으로써 준공검사 및 건축물에 대한 인수인계가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

6) 감리용역보고서 등 관련서류(기록관리사항 포함)를 감리용역 완료시까지 진흥원에 제출한다.

사. 기타사항

1) 감리자는 감리업무를 수행함에 있어서 당해 공사의 설계도서, 계약서, 감리과업지시서, 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 당해 공사의 특수성을 파악한 후 감리에 임해야 한다.

2) 계약서 및 제안요청서(과업지시서)에 명시되지 아니한 사항은 관계법령 및 규정에 따르며, 의견에 합의가 이루어지지 않을 경우에는 진흥원의 해석에 따른다.

3) 감리기간 중 관련법령이 개정될 경우에는 개정된 법률에 따라 감리업무를 수행한다.

4) 감리자는 시공자의 업무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 설계를 변경시키거나 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 아니 된다.

5) 감리자는 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공과 관련한 중요한 사항 및 예산과 관련된 사항에 대하여는 수시로 서면으로 실정보고 하여 진흥원의 승인을 득하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

6) 감리자는 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공과 관련된 중요사항에 대하여는 독단적인 판단과 처리보다는 수시로 감독관과 협의하여 필요한 자문을 제공하여야 한다.

7) 감리자는 공사기간 중 시공 중인 시설물 또는 완공 시설물에 하자가 발견 될 경우 이에 대한 원인을 조사하여 시정에 필요한 조치내용을 진흥원에 제출하여야 한다.

8) 감리자는 공사 시행중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관(내부 또는 외부)의 수감요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 한다.

9) 감리자는 장비 시운전 및 합동 하자점검 시 입회‧확인하여야 하며 이로 인한 추가 감리비는 지급하지 아니한다.

10) 감리자는 민원발생을 억제함은 물론 민원발생 요소를 사전에 예방‧조치하는 등 공정에 차질이 없도록 적극 조치하여야 한다.

11) 감리자는 당해공사와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품‧이권 또는 향응 등 품위를 손상하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.

12) 모든 설계도서 및 기타자료를 다른 목적에 이용 또는 업무상 취득한 사실을 누설하여서는 안 되며, 특히 보안에 유의하여야 한다.

13) 진흥원은 아래 사유가 발생하였을 경우에는 본 감리용역을 해약 또는 관계법에 의한 조치 등을 할 수 있다.

① 감리 이행이 불가능하다고 인정된 때

② 지시에 불응하여 감리를 진행할 경우

③ 계약조건을 위반한 때

④ 감리업무 수행 시 불성실 또는 중대한 과오로 인하여 본 사업시행에 막대한 재산 및 인명피해가 발생하였을 경우

2. 과업보고 등 행정사항

가. 과업보고  ※ 과업보고 일체는 서면을 원칙으로 함

1) 용역 착수보고 (계약체결 후 1주일 내)

① 감리자는 진흥원과 계약 후, 과업 착수 시 다음 각 호의 서류를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

가) 착수신고서 (사업책임기술자 선임계 및 이력서, 사용인감계, 감리업무 수행계획서, 과업수행 예정공정표, 감리원 구성(분야별 책임자) 등)

나) 보안대책 및 보안각서

다) 기타 진흥원이 지정한 사항

② 감리업무 수행계획서는 감리원의 조직과 구성, 투입기간, 개개인의 자격, 경력 및 업무분담내용 등에 대한 전체 감리업무와 월별 및 분기별 세부 감리업무 수행계획서를 계약내용 및 관련 규정에 따라 작성하여야 한다.

③ 감리원의 구성은 제안요청서에 기술된 과업내용 및 관련법령 등에 의거 관련분야 기술자로 구성되어야 한다.

2) 용역보고서 작성 및 보고 (감리 단계별 보고)

① 시공단계 보고

가) 기술검토

- 시공계획서 검토서

- 시공상세도 및 승인요청에 대한 검토결과

- 시공검측 요청에 대한 검측결과 내용

- 도면 검토사항

- 설계변경사항 검토서

나) 공정관리

- 공사추진현황

- 주간 공정표

다) 품질관리

- 품질시험 계획서

- 자재 적합여부 및 품질시험에 대한 시험결과 확인사항

라) 자재관리

- 자재반입 현황

마) 안전관리

- 주간 안전관리 활동 현황

- 안전교육 실시 현황

- 재해예방 안전기술지도 결과보고

- 안전관리비 사용내역(환경보전비 포함)

바) 현장관리

- 하도급 거래사항

- 각종 업무지시에 대한 처리사항

- 현장회의 회의록

- 현장에 관련된 기타 기록물

② 수시보고

가) 진흥원으로부터 보고의 지시가 있는 경우

나) 민원 등 공사 진행에 차질이 생길 우려가 있는 경우

다) 기타 시공과 관련하여 중요하다고 인정되는 경우

③ 주간보고

가) 주간 세부 공정계획서 및 실적보고서

나) 감리업무 내용에 관한 사항 일체

다) 기타 진흥원의 지시사항 및 중요하다고 인정되는 사항

3) 시공자가 제출하는 서류를 검토하고, 필요한 경우 의견을 첨부하여 진흥원에 보고

① 공사착수, 기성 및 준공보고서

② 관급자재 입체 또는 대체사용신청서

③ 현장실정보고서

④ 기타 시공과 관련되는 보고서 및 신청서

4) 완료보고 (감리용역 계약기간 종료 시)

① 감리완료보고서(결과보고서)

② 준공조서

③ 기타 본 공사와 관련된 서류 및 기록철(기록관리 사항)

※ 완료보고 결과물 일체는 저장매체(USB 등)에 파일로 일목요연하게 정리하여 제출