과 업 내 용 서

『장애예술 공연장』 기본 및 실시설계 용역

2021. 9.

(재)한국장애인문화예술원

-  목          차  -

제1장. 총 칙	1

제2장. 과업의 내용	2

제3장. 과업수행 지침	6

제4장. 설계도서 작성요령	13

제5장. 설계도서 제출목록	16

[붙임]	18

총 칙

과업의 명칭: 『장애예술 공연장』 기본 및 실시설계 용역

과업의 개요

대지위치: 서울 서대문구 충청로 7 구세군빌딩 내(구세군아트홀 및 1~3층)

설계범위:

기존 구세군아트홀(공연장), 로비(공용면적), 오피스 공간에 대한 기본 및 실시 설계

기존 면적:

구분	내용	시설규모	비고
공연장	전용	1,337㎡	공연장, 객석, 지원시설 등
	공용	1,415㎡	홀, 복도, 화장실, 공조실 등
오피스	전용	803㎡	업무공간, 창고 등
	공용	435㎡	홀, 복도, 화장실, 계단실 등
계		3,991㎡

※ 기존건물현황, 설계공모에 따라 변경

용  도: 장애예술 공연장 조성 및 편의/특화시설 조성 (리모델링)

건물규모는 설계과정에서 한국장애인문화예술원(이하 발주기관/감독기관)과 계약상대자(설계자)가 협의, 관계규정에 의하여 조정 될 수 있으며, 조정 시 이에 따라 과업내용 변경으로 인한 계약변경 예정.

공사예정 공사비: 5,500,000,000원 (VAT포함)

제시된 예산액은 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거비, 폐기물처리비, (필요시) 구조안전진단비, 공연장 기본 시스템비, 집기비품비, 인입비(전기, 수도, 가스 등), 각종 분담금, 인증비용 등에 대한 총공사비이며, 공종 간 배분하여 제시된 예산 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.
(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

공사예정가격이 예산액을 초과할 수 없으나 부득이 공사비 초과 시 감독관과 협의하여 공사량을 조정하여 예산액 범위 내 조정할 수 있다.

총 공사금액에 대한 각 공종별(건축, 기계, 전기, 통신 등) 내역구분에 대해서는 발주처 담당 감독관과 협의 후 작성될 수 있도록 한다.

용역예정 금액 예산액: 230,000,000원 (VAT포함)

보험료, 건축인․허가 수수료 등 포함

공사비 예산범위 내에서 설계함을 원칙으로 하고 변경시의 용역비는 예산액범위 내에서 협의한다.

설계기간: 착수일로부터 총 90일

발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 계약상대자는 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응한다.

다음 경우에는 감독관의 승인을 하여 과업기간을 변경할 수 있다.

용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

용역계약일반조건 제24조(불가항력)

용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

명칭의 정의

발주기관/감독기관/수요기관은 ‘한국장애인문화예술원’ 을 뜻한다.

과업의 범위

본 과업은 계획/중간(기본)/실시설계(공연장의 다목적 극장 리노베이션, 공용부 및 오피스 특화시설 계획)로 구성되며, 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획(변경) 인가를 포함한 인허가 처리.
※ 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 각종 심의, 인증을 득한 성과물이어야 함.
; 각종 예비인증 취득 시 예비인증 완료일정 및 건축허가(실시계획인가)일정은 추후 협의 후 조정할 수 있다.

사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

중간 및 실시 설계 단계에서 설계적정성검토를 위한 설계자료 제출 협조 (증감액 산출서 포함)

공사 주변현황 및 계획안에 맞는 공사예정공정표(안)을 작성. (근로기준법 및 국토교통부 고시 검토 적용)

기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 설계적정성 검토자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영.

본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 계약상대자의 협의 하에 수행한다.

사후정산 항목

장애물 없는 생활환경 예비인증, 설계의 안전성검토 및 안전관리계획수립 검토수수료 등 파악 (필요시)

기존 무대장치, 무대 음향, 공연장 입단면 상세도 및 기계, 설비, 소방 도면은 수요기관에서 제공 예정.

설계의 안전성 검토보고서 작성

건설기술 진흥법 및 건설공사 안전관리 업무수행 지침을 따른다.

국토교통부고시 지침 제12조에 따라 설계자는 설계안전검토보고서를 작성한다.

사업책임기술자와 공종별 책임기술자는 설계조건을 검토 및 확인하여 위험요소를 도출하고 저감대책을 고려하여 설계를 수행하여야 한다.

시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성 및 저감대책 사항.

설계에 포함된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

그 밖에 사공과정의 안전성 확보를 위하여 국토교통부장관이 고시하는 사항을 포함한다.

각종 기타용역 진행 시 진행사항에 적극 협조. (도시용역 경관성 검토 자료 협조 등)

관계기관 업무

본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인∙허가는 계약상대자가 대행한다.

계약상대자는 각종 인∙허가, 심의, 에너지관련 계획서 제출 등 관계기관과 협의 후 관련자료를 사전에 문서로 제출하고, 그 추진계획을 설계예정공정표에 포함한다.

본 과업의 각종 평가, 기타용역에 대하여 계약상대자는 각 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조한다.

계약상대자는 향후 준공 시 세움터 개설 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조한다.

계약상대자는 본 용역이 완료된 후, 관련사항에 대하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조한다.

과업의 내용

과업수행 단계별 제출서류

계약상대자는 용역착수 시에 다음 자료 2부를 제출한다.

착수계 (공문포함)

사업/분야별책임기술자 선임계: 공동, 분담이행일 경우 대표사 선임계 제출

설계용역 참여기술자(사업책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)현황 및 명단
-; 건설기술진흥법 제21조에 따른 경력신고 시 참여기술자 목록만 신고 가능

과업수행계획서

설계용역수행 조직표 (연락망 제출)

예정공정표: 표준설계관리일정표 참조, 모든 기타 용역일정과 관계기관 업무 포함.

낙찰금액에 대한 산출내역서(분담이행자 용역수행 구분내역서 : 총차/금차 구분)

하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황

인력, 장비투입 예정현황
※ 건설기술진흥법 제30조에 따라 기술자현황 및 계약현황, 관련기관 통보

보안각서 (보안계획서 작성 포함) ; 하도급 공종은 하도급 승인요청서에 첨부

공동수급협정서 (분담이행사별 금액, 비율 표기)

기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

계약상대자는 착수계 제출 후 협의 된 날짜에 착수회의를 개최하며, 승인된 착수회의 자료에 현장조사 결과 등을 포함하여 설명한다.

계획설계도서: 문서 제출, 설계적정성 검토자료 포함. (제5장 참조)

설계공모안을 기초로 하는 계획설계도서 제출 (공연장 구축을 위한 음향 설계 및 객석 대안제시 및 선정사유 및 비교검토서 포함)

관련법규 검토서 (각 공종별 및 도시계획관련 법규검토내용 포함)

현장조사 결과보고서

현황측량 성과도 보고서 (설계 공모안에 따른, 철거 구조 및 면적에 대한 구조안전진단 검토)

1단계 체크리스트

공종별 개략공사비 검토서

기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

중간설계도서: 문서로 제출, 설계적정성 검토자료 포함. (제5장 참조)

세부 제출도서는 제5장 제출목록을 참조

중간설계도서 (인테리어 도면을 포함한 공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

주요공법, 장비, 자재 선정 보고서 (공연장 구축을 위한 음향 설계 및 객석 대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

기타 발주기관이 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

BF 예비인증 취득 관련 검토서 및 자료

건축물 에너지효율등급/제로에너지 예비인증 취득 관련 검토서 및 자료

2단계 체크리스트

공종별 공사비 내역서: 예산초과 시 예산절감방안 검토서, 증가요인 검토서

공사예정공정표 (국토교통부 훈령 기준 검토자료 포함)

기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항 (관련서류 CD/USB)

설계VE 보고서 관련 협조.

예산절감내역 (전․후대비표 포함)

각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

건축협의(허가 및 실시계획인가)도서, 각종 예비인증 도서 제출 : 문서로 송부.
; 관계기관(각종 심의 부서)에 관련업무 요청 단계 시 ‘한국장애인문화예술원’으로 문서 제출.

실시설계 검토용도서: (승인된 예정공정표상의 제출일)까지 다음 서류를 감독관과 사전협의 후 문서로 제출. (설계적정성 검토자료 포함)

실시설계 도면

총괄원가계산서, 내역서, 산출서, 견적서 등

시방서 (표준시방서, 특기시방서)

각종 계산서

실시설계 체크리스트 (설계자 검토사항 작성)

공사예정공정표

설계 안전보건대장 검토서

실시설계도서; 3단계 체크리스트 검토결과 및 설계적정성 제안사항 반영. (제5장 참조)

설계용역 완수 검사원 [붙임 4]

세부 제출도서는 제5장 제출목록을 참조

실시설계도서 일체

공사예정공정표(공기산출근거 포함, 국토교통부 훈령에 따른 자료 포함)

설계설명서 및 종결보고서 (사업 절차 및 관계기관 각종 협의목록 포함)

건축협의서/실시계획(변경)인가 (제반 인허가 증빙자료 및 문서 포함)

사후정산 항목 정산자료

장애물 없는 생활환경 예비인증서 및 관련도서 (해당 시)

손해배상보험증권 (보증기간은 공사 완공일 까지 산정)

설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서

설계안정보건대장 (산업안전보건법 제67조)
※ 산업안전보건법 개정에 따라 설계자는 발주처에서 작성한 기본안전보건대장을 인계받아 설계안전보건대장 작성 후 감독관 확인을 받는다.

기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

계획/중간/실시설계/관계기관 협의도서 등의 모든 단계별 자료 포함된 CD/USB.
※ 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」, [별표2] 건축설계에서의 도서작성 구분, ‘상급’기준 작성.

공사계약요청자료

공사개요서 (공사예정공정표에 의한 공사기간(총차/금차) 포함)

총 공사원가계산서

내역서 (xls, xml), 견적서(pdf)

관급자재 목록 (관급심의결과 변동사항 포함)

설계도서

기타 서류

용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제8조)

설계용역 주간업무 [붙임 5]

설계용역 월간업무 [붙임 6]

업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

총사업비 지침에 따른 설계 적정성 검토를 위한 도서 (필요 시, 계획/중간/실시)

업무기록 및 협의

업무기록 및 협의

주간업무 : 매주 금요일 오전 10시까지 붙임 양식에 따라 감독관에게 전자우편으로 전달 (ex. 20210808 주간업무(장애예술공연장).hwp)
※ hwp파일로 작성, 책임기술자 확인, 각 공종(중간설계 이후) 포함

월간업무: 매월 말 오전 10시까지 문서(공문)로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 제출. (수정예정공정표 필요 시 포함)
(ex. 문서번호.pdf / 202107 월간업무(장애예술공연장).hwp 제출)

수시협의: 설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 내용을 분석하여 사전 통합 협의(수요기관 포함) 후 사업 담당 감독관에게 제출. 모든 문서와 각종 진행은 감독기관을 통하여 처리한다.

업무회의

일반사항

계약상대자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 계약상대자 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정한다.

본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

계약상대자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 한다.

계약상대자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영한다.

착수회의(Kickoff Meeting)는 장소와 일자를 협의하여 개최하고 사업책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명한다.

계획/중간/실시설계 발표회 : 설계자는 계획/중간/실시설계 발표자료를 작성하여 발표회 사전에 협의를 거친 후 수요기관 등에서 개최하여 관련내용을 협의한다.

수시회의: 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 발표 시 필요한 자료를 작성․배부한다.

기타 회의: 수요기관 및 감독기관의 필요에 따라 각종 기술적인 사항(음향 및 특수설비 시설) 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의 등 각종 자문회의를 개최 할 수 있으며, 이 때 설계자는 발주기관의 요청에 따라 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출한다.

업무보고 및 회의내용의 기록 : 회의록에 작성하고 참석자 확인 후 발주기관에 제출한다.

특수자재 및 공법의 반영

근거 규정: 「건설기술진흥법」, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」, 「환경기술 및 환경사업 지원법」 에 따라 지정, 고시된 시기술/신공법은 충분한 검토를 통하여 설계에 적극 반영한다.
- 계약대상자는 「건설기술진흥법」 시행규칙 제32조에 따라 신기술과 기존 공법에 대하여 시공성, 경제성, 유지관리성, 환경성 등을 종합적으로 비교·분석하여 해당 건설공사에 적용할 수 있는지를 검토해야한다.

국내 자재중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재를 사용한다.

계약상대자는 상기 운영기준에 따라 해당되는 자재 리스트 및 특수자재 검토서를 해당 시기에 작성, 제출한다. (사전공개 및 발주기관과 협의)

보안성 검토

계약상대자는 본 과업내용서에 따라 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

계약상대자는 보안상 다음사항을 준수한다.

착수 시 보안대책을 수립. (착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

폐기물은 소각 또는 파쇄 처리하고, 처리대장을 작성한다.

계약상대자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

설계공모 심사위원 지적사항 반영

계약상대자는 설계공모 심사위원의 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간, 실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시에 설명한다.

계획, 중간, 실시설계단계에 설계도서 제출 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부한다.

과업수행 지침

법령 등의 적용기준

본 과업의 수행은 건축법, 건축사법, 건축서비스산업 진흥법, 건설기술진흥법, 공연장법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 지적측량시행규칙, 환경영향평가법, 도시교통정비촉진법, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방시설공사업법, 실내공기질관리법 등 관련 법령과 해당 고시·지침 및 지자체의 조례 등을 적용하여 당해 사업이 관계규정(최신)에 위배되지 않도록 한다.

본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 검토에 관한 시행지침 [국토교통부 고시]에 따라 수행한다.

상기의 24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준에 따라 작성한다.

본 과업은 필요 시, 「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행한다. 지진하중 산정 시 2400년 재현주기지진의 유효지반가속도 S값은「건축구조기준」<표 0306.3.1>을 이용하여 결정한 S값의 100%보다 작아서는 안 된다. 지하내진, 비구조내진 적용.

계약상대자는 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

설계의 책임 및 손해배상

계약상대자는 계약서에서 정한 기간이내에 성과품 제출을 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 따라 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 계약상대자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 따라 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

계약상대자는 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

(계약예규) 용역계약일반조건 제41조

엔지니어링산업진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령

건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

대상 용역이 종합심사낙찰제(또는 종합심사평가제) 대상 공사일 경우 물량내역수정허용공종 선정 및 물량산출적정성 검토 등의 업무에 협조한다.

설계 일반 지침

계획설계, 중간설계 및 실시설계도서로 구분하여 제출한다.

공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 한다.

발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 계약상대자는 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다. (협의 후)

계약상대자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용한다.

건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야한다.

설계공모지침에서 제시된 내용들을 충분히 반영하여 설계되어야 한다. 단, 현장조사 결과 설계공모 지침을 지키기 어려운 경우 발주처와 상의하여 변경한다.

방수, 방습, 단열 차음, 소음 방지, 안전 등 건축물의 기본 성능에 소홀히 하지 않도록 설계되어야 한다.

기존 건물 환경; 접근성, 공간, 구조 현황을 검토하고, 이를 고려한 효율적이고 합리적인 설계를 한다.

구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영한다.

대지현황 및 주변 인접지역 현장조사 및 지반조사, 측량, 우수량, 지하수위 등을 조사하여 설계에 반영한다.

대지주변 및 건축물 내 소음원이 있는 경우, 소음에 대한 대책을 수립하여 설계한다.

건축협의(허가 및 실시계획인가)와 각종심의를 고려한다.

해당 허가권자와 사전 협의를 진행하여 용역일정을 관리한다.

각종 심의 및 예비인증과 관련, 사전검토 및 일정관리를 철저히 한다.

통신 및 설비에 있어서는 현재 기술수준에서 가급적 최신의 것을 적용하되 수요기관과 사전 협의하여 결정한다.

환경 친화적 외부 환경 조성 및 접근성 환경 개선

외부에서의 접근성 개선, 시각적 인지성 향상을 위한 사인물, 입면 계획을 위해 제안 범위 외 공간 설계(제안)시, 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계 (협의 필수)

주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계
※ 소음‧진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음‧방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난(대피시간 관련, 피난시뮬레이션으로 검증함)에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

안전성과 시공성이 확보된 설계

기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

설계자는 설계완료 후 설계과정 중 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영)와 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.(건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상일 경우)

본 공사의 기초, 기둥, 보, 슬래브 등을 대상으로 기존 건축물의 노후화 및 철거 시행 시 구조 안전성을 검토하여 리모델링 범위를 명확히 확정하고, 설계에 반영되어야 하며, 공연장(무대,객석), 로비 공간 가설공사 시 시스템 동바리 등(필요 시)을 고려하여 안전하게 설계되어야 한다.

진동 및 소음이 발생할 수 있는 공연장과 연습실 등의 공간은 구조적 안전성을 재검토하여 필요시 철거 후 재시공 등을 가장 합리적으로 결정 후 실시설계에 반영한다.

주요자재 사용계획

기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용한다.

국내자재 중 KS품 사용, KS품 없을 경우 발주기관과 협의하여 선정한다.

소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영

조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영한다.

건축물의 요구 성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 [붙임7]의 양식에 따라 작성하여 승인을 받아야 한다. (특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출 시에 별도 제출)

하도급의 범위: 계약상대자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

설계자는 건축법 제67조에 따라 자격을 갖춘 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

계약상대자는 하도급 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급(사전승인 필요)하며, 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

해당 건설공사 중 유해․위험 요인의 감소방안을 마련하여 공사 중 산업재해 예방을 위한 설계가 될 수 있도록 해야 한다.

[유해ㆍ위험요인과 감소대책에 대한 설계조건]

No	유해·위험요인	설계조건
1	추락	추락 사고 시 작업자의 안전을 위한 가설 계획 마련
2	전도	장비 등의 전도 시 피해가 최소화 될 수 있는 장비ㆍ인원 투입 계획을 반영한 공정계획 마련
3	낙하	공사중 낙하 사고에 따른 작업자의 안전을 위한 가설 계획
4	비래	비래 사고 예방을 위한 공정 계획 마련
5	충돌	충돌 사고 예방을 위한 장비ㆍ인원 투입 계획을 반영한 공정계획 마련
6	협착	적정 안전관리비 계상
7	붕괴	공사중 붕괴 예방을 위한 설계안전성 검토
8	위해물질 등의 접촉	위해물질 등의 접촉 사고 예방을 위한 공정계획 마련
9	감전	사고 예방을 위한 공정 계획 마련
10	폭발	적정 안전관리비 계상 및 가설 계획 마련
11	화재	화재 빈발 공종의 적정 공정계획 마련

※ 계약 체결 후 발주자가 제공하는 기본안전보건대장 참조

설계 세부 지침

계획 범위

본 과업은 서울 서대문구 충청로 7 구세군빌딩 내구세군아트홀 및 1~3층)‘(준주거지역/중심지미관지구, 중점경관관리구역)에 조성 예정인 ‘장애예술 공연장’에 대한 기본설계 및 실시설계 용역이다.

본 지침서에서 요구하는 ‘장애예술 공연장’의 운영 및 공간 프로그램 [붙임1]이 반영된 건축물과 건축 환경을 제안한다.

건축물의 용도는 「건축법」에 의한 문화시설(공연장 및 편의/특화시설)로 설계자가 구성․제안한다.

건축계획의 기본방향

공연장 조성과 오피스와 기존 시설이 서로 유기적인 연계성을 갖도록 계획한다.

기능에 충실하되 공간 활용을 고려하여 계획한다.

공연장: 객석 및 무대 환경에 적합한 구조적 안전성과 최적의 관람 환경을 확보하여야 한다.

오피스: 특화공간계획에 따른 접근환경과 사무공간과 공유공간에 대한 환경을 제안한다.

시설 구성 및 조닝계획

시설은 ‘장애예술’ 공연장 및 지원영역과 전문,지역 공연예술 교류영역으로 구분되어있으며, 공간 프로그램 [붙임1] 시설규모기준을 참고하여 각 영역별 특성에 맞고 효율적인 사용을 위해 계획되어야한다. (설계자의 통합적 설계제안에 따라 면적 변경은 협의가능하며 그 범위는±3%를 기준으로 한다.)

이동자의 특성(관람객, 공연 스텝, 관리자, 다양한 이동/시각/지체/지적 약자, 서비스, 지하철연결통로 이용 등)을 고려하여 각 영역 및 동선간의 간섭을 최소화하도록 하고, 관람객과 공연자들의 편의성을 확보하도록 한다.

다양한 이동/시각/지체/지적 약자의 수평, 수직 이동동선과 시설간의 연계성을 충분히 고려하고, 편의를 제공할 수 있는 서비스 공간 및 프로그램을 제안한다.

시설의 특성상 특화서비스 또는 보안상 제한구역이 필요한 구역에 대해서는 별도의 동선계획 또는 영역을 계획/수립한다.

화재 및 재난 대피시, 모든 사람들이 안전하게 이동할 수 있는 이동환경 (턱없는 바닥, 안내사인물, 조명, 핸드레일 등)을 계획한다.

영역별 계획시 고려사항

공연장 부문

공연장 객석수, 무대형식, 장르운영계획을 충분히 충족할 수 있도록 설계한다.

객석은 수납식으로 고려하며 장애인석을 포함하여 300석을 확보하도록 한다.

무대형식은 연극, 공연을 중점으로 음향특화설비를 갖춘 공연장을 계획하되, 다채로운 공연도 가능하도록 변형이 가능한 무대시스템(블랙박스형 극장 지향)으로 계획하도록 한다.

수납식 객석 이외의 빈 공간에서는 자유롭게 무대와 객석을 설치 할 수 있는 환경을 제안한다.

공연장 객석은 1층/2층 어느 위치에서도 시야 및 음향에 제한을 받지 않도록 하여야 하며, 다양한 이동/시각/지체/지적 약자들도 좌석을 선택하여 관람할 수 있는 최적의 환경을 제안한다.

객석내 계단 단차는 관객의 안전을 위해 최대 200mm가 넘지 않도록 계획하며, 입구로 부터의 단차는 무단차로 계획한다.

객석은 가시선 확보에 의한 적정 경사도 및 좌석 배치를 통해 관람에 사각지대 및 백스테이지가 노출되는 객석이 최대한 안생기도록 계획한다.

공연장의 무대/객석/마감재료는 무대형식과 음향설계, 조명, 의장적인 측면을 고려하여 선택한다.

공연장의 음향부문(건축 및 전기)은 건축설계단계부터 시공 후 성능테스트까지 전문컨설턴트와 협의를 거쳐 진행하여 최적의 음향성능을 가질 수 있도록 한다.

조정실 확장에 따른 구조적 변경 혹은 벽채 철거는 계획협의 후 진행한다.

공연장의 그리드 및 각종 관리보수를 위한 CAT-WALK (무대,객석,천정 내부)와 점검통로, 또는 점검구를 반영하여 계획한다.
*무대장치 및 극장 내 음향, 조명 등 설비 수준에 대한 세부사항은 발주기관과 추후 협의하여 최종결정한다.

무대기계, 조명, 음향, 영상 등과 관계되는 모든 설비(전설/인입연결)은 객석 및 무대에 돌출 되지 않도록 매입형으로 계획하며, 유지관리가 용이하도록 한다.

방음, 방진, 음향 설계를 통해 소음, 진동을 차단하고, 기타 관련설비에 대해 종합적으로 고려하여 계획한다.

공연장 내부는 ‘공연장법’ 및 ‘공연장 건립 가이드라인 구축 연구’ (한국문화예술회관 연합회), ‘문화예술단체를 위한 공연장 조성 매뉴얼’ (예술경영지원센터)을 참조하여, 화재 및 긴급 피난 상황에 충분히 대비하여 출구 및 복도(이동통로) 환경을 계획한다.

공연장과 연결되어 있는 로비공간과 이동공간에는 적정 개소에 입장하지 못한 외부관객들과 관계자들을 위해 모니터를 설치하여, 내부 공연실황을 알 수 있도록 한다.

공연지원 부분

대기실 등 공연지원시설은 무대와의 동선을 연계하여 계획한다.

관람객, 출연자, 관리자의 동선을 구분하고 물품반입 등을 위한 서비스 동선을 원활하게 접근 할 수 있도록 한다.

대규모 공연시 많은 출연자들의 등장 및 퇴장을 고려해, 효율적인 이동동선을 계획하고, 무대동선과 연계한 대기공간을 계획하여, 협소한 이동통로에서 동선이 겹쳐서 사고가 나는 것을 예방할 수 있도록 한다.

설계자의 계획 의도에 따라 분장실 또는 휴게공간 등을 통합하여 제안할 수 있다.

설계자의 계획 의도에 따라 현재 사용중인 용도와 배치를 달리하여 계획할 수 있으며 기존 용도 및 배치 유지의 경우 마감재 보수방안을 계획한다. (구조/벽채 변경시 협의 필수)

무대현황과 출연자의 분장,의상을 수시로 확인 할 수 있는 설비(모니터/스피커 등), 거울 등을 적절하게 배치/계획한다.

샤워실, 락커룸, 화장실은 남녀구분을 구분하고, 장애인 또한 사용할 수 있는 접근환경을 확보한다.

오피스 부문 (특화공간)

<오피스-리빙룸/아트랩/아트 스튜디오>는 공연장과 연계된 특화 및 편의 공간으로서, 공연자/창작자/관람자/시민 들이 함께 공유, 교류, 소통, 휴식할 수 있는 공간을 제안한다.

공연장 기능에서 확장하여, 다목적공간, 리빙룸 및 추가 대기공간을 확보하고 안내견 휴식 공간과 같은 다채로운 서비스 공간을 제안한다.

시설물 및 특화공간의 집중관리 및 통제가 편리하고, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

각 층별 특화프로그램 공간들과 운영지원, 사무, 서비스 공간간의 연계성을 잘 파악하고 계획한다.

다양한 이용자들과 복합화된 특화프로그램들을 고려하여 안전하고 기능적인 수직적/수평적 동선체계를 계획하고, 입체적인 접근/이동 환경을 계획하여 관리, 사용, 유지가 편하도록 계획한다.

향후 프로그램에 따라 공간이 대응할 수 있는 가변성과 융통성, 확장성을 고려한 계획을 한다.

시설규모기준 공간 프로그램 [붙임1] 참고하여 제안하되 설계자의 통합적 설계제안에 따라 면적 변경은 협의 가능하며 그 범위는±3%를 기준으로 한다.

<사무공간/운영>은 접근적 제한이 필요한 공간임과 동시에 외부인이 필요에 따라 쉽게 찾을 수 있으며 방문할 수 있는 공간이 되어야한다. 특화프로그램 공간들과 외부에서의 연계성을 고려하여 계획한다.

오피스 특화시설 및 사무시설은 ‘업무시설 적정 공간면적 설계기준 개발 연구’ (한국건설기술연구원), ‘사업장 휴게시설 설치 운영 가이드’ (고용노동부 안전보건공단), ‘공공부문 공간혁신 가이드라인‘를 참조하여 최적화된 시설규모를 파악하고 계획한다.

‘서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인’ (서울특별시 문화본부), ‘장애물 없는 생활환경 인증 상세표준도(보건복지부)을 참조하여, 각 특화시설 및 사무시설로의 쉽게 인지/접근가능한 환경을 계획한다.

오피스-리빙룸 계획 방향

로비와 공용공간 및 로비와 연계된 편의시설로서, 다양한 장애유형을 수용하고 휴식, 신체적/정신적 안정이 확보되는 공간/서비스 계획을 제안한다.

장애특화 휴게공간- 다양한 장애유형을 고려하여 최적화된 휴게공간을 계획한다.

서비스 프로그램 공간- 전동휠체어 충전소, 안내견 휴식공간 등 장애유형별 특화 서비스 공간을 제안한다.

편의 시설- 휴게공간을 지원하는 편의 시설을 계획한다.

오피스-아트랩 계획 방향

리딩룸/미팅룸(3개소*)- 연극/공연 대본 연습을 할 수 있는 공간으로 문화프로그램 운영공간 및 미팅룸으로 변용하여 사용할 수 있도록 계획한다. (*총 개소: 추후 협의 가능)

스튜디오(3개소*)- 영상스튜디오/레코딩스튜디오/미디어스튜디오 전문 창작 및 기획자들을 위한 프로그램 공간을 계획한다. (*총 개소: 추후 협의 가능). 음향환경과 방음 시스템 등을 고려한 스튜디오별 구획 및 인테리어 계획 필수.

공유오피스/라이브러리- 연습실(스튜디오)와 연계된 지원시설로서의 휴게공간/교류공간을 제안한다.

공유오피스/라이브러리- 오픈 라이브러리의 환경을 제안하고, 책을 위한 고정적 서가공간과 함께 이용객들이 다양한 이용방식으로 사용할 수 있는 가구계획을 계획한다.

공유오피스/라이브러리- 업무을 위한 공간 외에 다양한 소모임이나 토론이 가능한 라운지 형태의 공간을 계획한다.

오피스-아트스튜디오 계획 방향

연습실- 무용, 연극 등의 예술 활동을 고려한 공간 계획으로, 다양한 예술가들을 위한 공간/환경 제안, 공연장 무대 환경과 최대한 유사한 환경 제공, 음향환경과 방음 시스템 / 대형 거울, 사이드바, 바닥 마감 등 고려

연습실(스튜디오)- 무용,연극 등의 예술 활동을 고려한 공간 계획으로, 다양한 예술가들을 위한 공간/환경 제안.

편의시설- 연습실(스튜디오)과 연계된 편의시설로서, 접근이 용이하도록 계획한다.

편의시설-남녀 샤워실/락커룸을 별도 공간으로 계획하고, 접근성을 고려하여 WET&DRY AREA의 단차를 최소화 한다.

오피스-사무/운영공간 계획 방향

보안상 제한구역(간부실, 문서보관실 등)이 필요 대해서는 별도의 동선계획 또는 영역을 계획/수립한다. (추후 관계자와 협의 수렴)

운영자 및 관리자의 동선 효율성을 고려하여 계획한다.

공용공간 (이동 공간 및 로비)

이동공간

각 실, 수직/수평 동선, 외부 출입구와의 연계성 및 이동 환경 등에 대해 고려하고 각종 법규 등 가이드라인을 고려하여 계획한다.

다양한 장애유형의 사용자들을 위해 입체적인 이동 가이드를 수렴하고,

- 복도에는 단차를 두지 않는다.

- 긴급시 모두에게 안전하고 피난하기 쉬운 이동환경을 제안한다.

- 바닥 점자블록, 벽 점자 안내 사이니지, 피난 안내 조명 등 다채로운 공간적 인지성을 확보하도록 한다.

공연 시작/종료시, 많은 인원이 사용하므로, 안전하고 충분한 넓이의 이동환경을 고려한다.
협소 공간일 경우 포켓 대기공간을 제안/계획한다.

건축법상 방화구획이 필요한 곳을 현황에서 검토하고, 이동환경을 개선할 수 있는 방안을 제안한다.

로비공간

기존 공연장 출입구의 접근성 환경 개선을 통해 보다 유기적이며 안전한 연결성을 갖도록 계획한다.

공연자의 관람 문화를 향상시킬 수 있는 서비스; 안내 카운터 및 부스를 계획하고, 다양한 장애유형에 맞는 서비스를 제공하도록 한다.

대상지의 특성상, 주출입구(1)/부출입구(2)/주차장으로부터의 출입 등, 복잡한 이동동선이 혼재되어있는 로비 환경이다. 이를 고려하여 보다 자연스럽고 공간의 효용성, 인지성을 향상 시킬 수 있는 공간적  아이덴티티를 계획하고, 혼란스럽지 않은 공간환경으로 개선한다.

지하주차장과 더불어 지하철/지하도으로부터의 접근성 개선을 제안한다.
*추후 서울시도시철도공사 및 구세군 아트홀 관계자와 충분한 협의를 통해 계획한다.

설계진행 시 유의사항

「건설기술 진흥법」제62조(건설공사의 안전관리), 「건설기술 진흥법 시행령」제98조(안전관리계획의 수립) 및 제100조(안전점검의 시기∙방법 등)를 검토하여 「건설기술 진흥법」제63조(안전관리비용)에 따른 내역에 PS로 반영한다.

「건설공사 품질관리 업무지침」[별표2]에 따른 가설기자재 시험비용,「화재예방, 소방시설 설치∙유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」제15조의5(임시소방시설의 종류 및 설치기준 등) 및「임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)」을 검토하여 내역에 반영한다.

장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다. ‘서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인’ (서울특별시 문화본부), ‘장애물 없는 생활환경 인증 상세표준도(보건복지부) 및 해외 Universal Design 가이드라인 등을 참조하여 적극적인 접근성 개선 디자인을 제안한다.

계약상대자는 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영한다. (외부 조성 계획 필요시)

계약상대자는 현 구세군 아트의 추가현황측량과 공연장 제안에 필요한 구조안전진단을 시행한다.

단계별 도서제출: 공문 제출 (공정별 책임기술자가 ‘확인’한 공사비 배분표 포함)

계약상대자는 각 사업특성에 맞게 표준예정공정표를 기준으로 예정공정표를 작성 한다. 예정공정표에는 단계별 도서제출일을 지정하고 주요일정을 계획 후 승인을 득한다.

계약상대자는 단계별 체크리스트를 구체적으로 작성 후 제출하고, 감독관 및 수요기관의 의견을 검토 후 도서에 반영한다. 최종 제출도서에 포함한다.

계약상대자는 체크리스트 “세부검토내용”을 작성(구체적 작성, 도면번호, 검토서 포함)하고, 적용사항에 대하여 발주기관과 협의 한다.

설계도서의 분리작성

건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정한다.

설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시한다. (착수계와 비교확인, 경력증명서 신청 시 확인)

설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

건축, 기계, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성하고 견적(부가세 및 제경비 포함여부 확인)일 경우 2개 이상 조사한다.

국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

건축폐기물처리용역 자료[건설폐기물/혼합폐기물/폐아스팔트폐기물/가연성폐기물/지정폐기물(폐석면) 등]는 일반용역, 분리발주가 가능하도록 작성한다. 또한 기타 폐기물 (현장조사 등으로 매립폐기물 확인 시 포함)발생 시 사전 협의하여 처리한다. (생활폐기물은 별도 수요기관에서 처리)

설계도서 표기

설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

건축도면: A

건축구조도면: S

토목도면: C (필요시)

조경도면: L (필요시)

기계설비도면: M (소화설비도면 : MF)

전기도면: E (전기소방 : EF)

통신도면: ET

도면작성

도면규격은 A1/A3 규격을 사용한다.

도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기한다.

토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(overlapping에 의한 cross check)가 가능하도록 한다.

설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시한다.

설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

각종 부착시설물(안내 사인물 계획)의 표시 : 표지 체계는 일반인과 장애인용, 실내와 실외로 구분하고, 계획 설계 시, 디자인(채색시안)안과 설치 위치를 계획하여 검토 받도록 한다.

건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등) 작성

국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

각 공종별(건축, 구조, 기계, 조경, 토목, 전기, 통신, 소방) 시공상세도와 시공 시 주의사항을 시방서와 도면에 작성한다. 공사 진행단계별로 작성하여야 하는 시공 상세도면을 작성하거나 작성되지 않은 목록을 시방서에 명시한다.

공종간의 간섭사항 및 시공에 필요한 주요사항은 도면 작성. 주의사항도 작성한다.

필요한 경우, 토목설계 시 별도로 진행되는 (소규모)지하안전영향평가용역의 계약상대자와 협조하여 작성한다. (굴토심의, 구조안전심의 관련 등 포함)작성한다.

설계도서 작성요령

공통사항

설계도서 작성은 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시)를 준수하고 동 기준의 별표 「설계도서 작성방법」에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시한다.
「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개한다.

설계자가 작성·제출하는 시방서 안내

설계자가 작성·제출하는 시방서는 조달청에서 ‘시방서 작성 간소화 및 내실화’ 목적으로 마련하여 제공하는 『설계자 작성용 공사시방서 방침』에 따라 작성한다.(붙임11, 12 참고)

작성방법은 표준시방서(국토교통부)에 명시된 내용은 코드번호(링크처리)로 대체하고, 중요·핵심사항과 주의사항 등은 제공 양식에 따라 설계자가 별도 작성·제출한다.

시방서의 내용과 관련하여 공사관계자 간의 시공관리에 혼선이 우려되는 부분은 보다 상세하게 작성하여 시공 중 논란이 없도록 하여야 하며, 논란이 발생 시에는 설계자의 의견 제시 등 해결에 적극 협조하여야 한다.
※ 특기시방서는 임의 양식으로 작성 가능

계획설계

현장조사, 발주기관으로부터 제공된 자료, 사용자의 의도와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

개략 공사비 내역(공종별 구분)을 제출한다.

현장조사

관련문헌 및 서류조사와 현장조사 병행

문헌 및 서류조사
- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사한다. (구조변경(철거 및 추가)시 검토 및 협의 필수)
- 해당 관계기관 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수한다.

현장조사
- 기존 건축물 및 공간 환경(철거대상물 포함; 공연장 설비, 기계실, 방음 설비 등), 주변 환경 (지형, 공공시설물), 기존 수목, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관한다.
- 대지 주변의 건축물이나 공공시설물 (지하철, 벤치, 조경물) 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사한다.
- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다. (관계기관 확인자료 포함)

문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부한다.

중간설계

중간설계(건축법 제11조제2항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정(무대, 기계, 음향, 조명, 영상 등)에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계.

계획설계 완료 시 설계용역 적정성 검토자료를 준비하고 검토결과에 따른 조치사항을 반영하여 설계한다. 중간설계 완료 시 계획설계 단계의 조치사항을 반영한 설계적정성 검토자료를 작성한다.

개략공사비 산정: 공종별 내역서 및 전체 공사비 예산에 대한 각 공종 공사비 분석표를 작성하고 각 공종 책임기술자 확인(날인) 후 제출한다.

2단계 체크리스트(중간설계)를 각 공종 감독관과 협의 및 확인 후 작성한다.

실시설계

실시설계 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 제출하는 설계의 최종단계를 말한다.

공사에 필요한 설계도서를 작성하며, 아래사항을 포함한다.

시설공사 가설계획도, 건축물 내·외부 색채 계획도, 자재견본 등

각종 계산서 및 검토서, 인증·심의·건축허가(실시계획(변경)인가) 관련도서를 포함.

가설계획도, 기초 구조도, 토목 흙막이도면을 overlap(도면제출)하여 검토 확인

최종 도서 제출 전 실시설계검토용 도서(설계적정성 검토 자료)를 제출한다.

건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 공종별 및 발주단위별로 내역을 작성한다.

시설공사 계약요청 자료로 공사개요서(장기계속공사 일 경우 금차분의 예산에 맞게 공사비 예산을 분리하여 작성) 및 관급자재 목록(운반거리, 조건, 금액, 구분표기), 공사원가계산서를 작성하여 제출한다. 최종 설계금액이 공사비 예산을 초과 할 경우 설계용역 미완으로 간주한다.

건설폐기물처리용역 관련 도서(건설폐기물/폐아스콘/혼합건설폐기물/지정폐기물 등 각각)는 수량을 검토(철거물량 확인)한 후 관계법령에 맞게 분리발주가 가능하도록 작성한다. 기타의 폐기물 발생 및 발견(현장조사) 시 관계법령에 맞게 설계도서를 작성한다. (건설폐기물 수량산출서는 별도로 작성하여 제출)

설계적정성 검토자료는 실시설계검토용도서(내역서 포함)를 정리하여 제출하고 토론회 조치사항은 제출 전 감독기관 및 수요기관 확인 후 최종도서에 반영한다.

3단계 체크리스트(실시설계)를 각 공종 감독관과 협의 및 확인 후 작성한다.

최종 CD/USB 제작: 계획/중간/실시설계 도서 및 검토/발표자료와 각종 서류, 인증/심의/허가 등 모든 자료와 참여기술자(책임기술자/담당자) 연락처를 포함하여 제작한다.

설계도서 제출목록

계획설계 제출도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계	A4 (도면은 A3반책)	3	부	개략적조감도 및 스터디 모형(부지)포함 개략공사비 검토서(공종별) 포함
2	현장조사보고서				유사시설견학보고서 포함
3	관련법규 검토서				국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 에너지 관련법령 등 포함
4	구조안전 및 내진설계 확인	A4	7	부	구조안전확인서 포함
5	설계적정성 검토자료	A4/A3	10	부	합동토론회 일정에 따라 제출시기 조정
6	공사비 검토서	A4	3	부	공사비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인
7	기타	A4	3	부	체크리스트(각 공종 감독관 확인), 공사비 증액 검토자료(필요 시)CD 등

중간설계 제출도서

구분	설계도서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계 보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	주요자재 비교검토서, 재료 검토서 포함
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	내 역 서 (관급포함)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	각 공종별 예산 분배표 (공종별책임기술자 확인)
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방
6	설계적정성 검토자료	A3	10	부	통합본							계획설계 조치결과 포함
7	각종 예비인증 관련 검토서	A4	3	부	통합본							건축물에너지효율등급/BF/제로에너지
8	설계안전보건대장	A4	3	부	통합본
9	공사예정공정표	A3	3	부	통합본							국토부 고시 검토내용 포함
10	기타, 체크리스트	A4	3	부	통합본, USB							공사비 예산 초과 시 조치계획서 제출

실시설계 제출도서

공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	3	부	통합본
2	설계설명서	A4	3	부	통합본							색채계획 포함.
3	설계도면	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	에너지절약계획서 포함. 반접이.
		A3	5
4	각종 계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서(도급/관급)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	일위대가/단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
8	표준시방서(국토부)/ 특기/관급시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	조감도(파일포함)	-	3	부	◯							A1 이상, 추후협의
10	공사예정공정표	-	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	도면에 포함
11	CD/USB	-	10	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	계획/중간/실시/각종심의/인허가관려/문서/회의록/각종발표자료 등 포함
12	공사계약요청 자료	공사원가계산서(총차/금차예산), 관급자재목록, 공사원가계산서 (모두excel file) 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등.
13	자재 견본서	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	색상, 모델명 등 포함
14	공사예정공정표	-	3	부
15	설계안정성검토서	A4	3	부								한국시설안전공단
16	현장설명서	A4	3	부	건축(토목/조경/기계), 전기, 통신, 소방
17	건축협의/ 실시계획인가도서	-	2	부								신청 전 문서 제출. 완료 후 예비인중서 포함.
18	설계변경 환류자료 및 하자DB자료 검토서	-	2	부
19	기타, 체크리스트	각 단계별 도서파일(CD) 등										발주기관요구

※ 최종성과물 제출 시 계획설계부터 실시설계 과정의 모든 자료 포함하여 1장으로 제작.

종결보고서 : 공사개요, 추진경위(회의록), 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 목록, 하도급 현황, 수정․보완 사항/조치결과, 건축물유지관리계획서 등 일체 포함.

공사예정공정표는 각 공종 간의 간섭사항을 검토 후 공정계획을 수립 및 공사기간을 산정(절대공기, 근로기준법 개정사항 반영)하고 공사량과 주변 현장환경에 맞게 작성하여 제출한다. 공사비 예산배정 현황 또한 고려한다. 아울러, 지열공사와 같이 별도의 관급(수의)계약으로 진행되는 공종은 그 책임기술자에게 확인을 받아 공정표에 산입하여 주공종에 간섭이 발생하지 않도록 한다.

참여기술자 현황 (공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

설계변경 환류자료 및 하자DB자료 (조달청 홈페이지>업무별자료 참조) 작성.

기타 발주기관이 요구하는 성과품(단계별 제출도서의 종류와 수량은 협의 후 조정 가능)

[붙임 1] 수요기관 요청내용

■ 장애문화예술 공연장 Space Program - 공연장

구분	층	세부시설	면적(㎡)	비고
공연장 (전용)	1	매표소	24	안내 사이물 및 사용자의 눈높이에 맞는 다양한 가구계획 등의 접근성 계획 (이동/시각적 약자 접근성 개선 확보)
		사무실	38
		리허설룸	95	공연자를 위한 리허설 및 교율 공간으로 외부 접근 통제 가능 및 접근성 제안
		주연분장실	43	- 2개소 확보: 화장실 및 샤워실 확보 및 이동약자를 위한 접근성 확보
		단체분장실	118	- 2개소 확보: 화장실 및 샤워실 확보 및 이동약자를 위한 접근성 확보
		창고	57	- 3개소: 매표소/리허설룸/의상보관실 지원
		소계	375
	2	객석	409	- 수납식 객석 : (300석 확보+이동/청각/시각 약자 좌석 확보)
		무대	220	- 리프트형 및 다기능형 무대 확장 - 기존 내장재 철거 및 그리드 시스템 구성 다양한 음향 공간 제안 (전문가 협의)
		리프트/계단	30	- 2개소: 화물 이동 및 접근로 확보
		공연 설비	7	- 앰프 및 음향시스템 및 설비 구축 (추후 감독관과 설비계획 조정)
		안내 및 보관함	11
		사무실	23
		소계	700
	3	객석	213	- 시야각 및 면적확보를 위한 기존 구조/슬라브 철거 가능 (구조검토 및 안전성 계획 필요) - 이동/지체/지적/청각/시각 약자를 위한 다양한 좌석 확보
		조정실	22	- 확장(면적): 음향/조명/방송 조정실, 영상 투사실, 번역실 및 오디오 랙 룸 확보 공간 및 수어/문자 통역실 추가 확보
		창고	13	- 조정실과 별도 구획된 콘솔 및 장비 유지관리를 위한 부품자재창고 계획
		공연 설비실	15	- 디머실 및 추가 필수 설비 구축 (추후 감독관과 설비계획 조정)
		소계	262
중계			1,337
공연장 (공용)	1/2/3	홀 / 복도 / 화장실 / 방풍실 등	1415	- 이동/지체/지적/청각/시각 약자를 위한 지원 공간/프로그램/사인물 계획 - 다목적화장실 확보
중계			1,415

※ ‘장애예술 공연장 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립연구(2020.4)’에 따라 기본 공간 구상 및 연계 프로그램을 구성하고, 현 대상지(구세군 아트홀-공연장)의 현황과 발주기관 ‘한국장애인문화예술원’의 사용 목적에 따라, 공간 및 운영 프로그램 구체화를 통해 공연장 및 객석수를 조정하였고 특화프로그램 공간(오피스)을 구성함.

※ 추후 변동될 수 있음. 세부 실의 구성, 개수나 면적 등은 설계자가 의도에 따라 변경이 가능함.

※ 철거 및 확장 건축 면적 개요

+ 객석(2층) - 객석 수 총300석(장애인석 포함)과 무대 타입을 설계자의 의도에 따른 철거 면적

+ 조정실(2층) - 추가 프로그램(수어/문자 통역실) 및 설계자의 의도에 따른 프로그램 계획에 대한 면적 확보

[붙임 1] 수요기관 요청내용 (계속)

■ 장애문화예술 공연장 Space Program – 오피스

구분	층	세부시설	면적(㎡)	비고
오피스 (리빙룸)	2	휴게공간	72	- 이동/지체/지적/청각/시각 약자를 위한 특화 휴게 공간 제안: 리클라이너실, 심리안정감각자극실, 전동침대 등의 공간 구성
		서비스 공간	18	- 휴게 공간 연계 서비스 계획 제안 전동휠첼어 충전시스템, 휠체어 대여 공간 등
		편의시설	40	- 휴게 공간 연계 편의 시설 계획: 다목적화장실, 샤워실, 탕비실 등
		소계	130
오피스 (아트랩)	2	리딩룸/미팅룸	93	- 2개소 확보: 4~6인 리딩룸/미팅룸 1개소 확보: 10~12인리딩룸/미팅룸 대본 리딩/대관 업체 미팅 등의 회의 공간 계획 (총 개소 추후 협의 가능)
		스튜디오	111	- 영상스튜디오(움직임연습실)(8인) : 크로마키 및 촬영장비 공간 확보, 대형 거울 등 필요 시설 구축 - 레코딩스튜디오(사운드연습실)(5인) : 음향/방음 시스템, 편집실 환경 제안 - 미디어스튜디오(편집/디자인실)(6인): 편집 기기 및 컴퓨터 등 작업 공간 확보 - 음향 환경과 방음 시스템 등을 고려한 사용자 환경 제안
		공유오피스 & 라이브러리	50	다기능적 공간으로서, 각 스튜디오 사용 후 휴식 및 오픈형 회의 공간 제공
		소계	254
중계			384
오피스 (아트 스튜디오)	3	스튜디오	245	무용, 연극 등 예술 활동을 고려한 다양한 사용자를 위한 공간 환경 제안. 공연장 시설과 최대한 유사한 무대 환경으로 조성 대형 거울, 사이드바, 바닥 마감 등 (상세 협의 필요)
		편의시설	66	- 별도의 샤워실 및 락커룸 공간 구획 - 탈의실 계획 : 남녀 구성비로 설치공간을 구분하여 계획하고, DRY&WET AREA 의 단을 최소화하여 이동접근성을 확보.
		사무/운영 공간	75	공연장 및 오피스 운영 STAFF 공간: - 사무공간 / 간부공간 / 회의실 제안 - 사무공간과 인접한 장소에 대관 업체 접견공간 및 소규모 회의 공간으로 활용할 수 있도록 별도 회의실 제안
		창고 및 아카이브	32	- 사무 공간 및 스튜디오와 연계하여 배치
		소계	418
오피스 (공용)	2/3	홀 / 복도 / 화장실 / 방풍실 등	435	- 이동/지체/지적/청각/시각 약자를 위한 접근성 계선 계획 - 다목적화장실 확보
중계			435
합 계 (공연장+오피스)			3,990

※ ‘공연장 건립 가이드라인 구축 연구’ (한국문화예술회관 연합회), ‘문화예술단체를 위한 공연장 조성 매뉴얼’ (예술경졍지원센터) - 참조

※ ‘서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인’ (서울특별시 문화본부), ‘장애물 없는 생활환경 인증 상세표준도(보건복지부) - 참조

※ ‘업무시설 적정 공간면적 설계기준 개발 연구’ (한국건설기술연구원), ‘사업장 휴게시설 설치 운영 가이드’ (고용노동부 안전보건공단), ‘공공부문 공간혁신 가이드라인‘ - 참조

[붙임2] 청렴서약서 및 보안각서

청 렴 서 약 서

용  역  명:	설계용역

계약상대자:

당 사는 위 공사의 설계에 반영되는 관급자재 선정을 위한 심의(안) 작성에 있어 관계 법령 등에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명하게 관급자재가 선정될 수 있도록 최선을 다할 것이며, 설계용역 수행과정에서 관급자재를 납품하고자 희망하는 업체에게 어떠한 금품ㆍ향응이나 부당한 이익을 제공받지 않을 것을 확약합니다.

만약 이를 위반할 시에는 어떠한 처벌이나 불이익 조치도 감수하겠으며, 조달청의 조치와 관련하여 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20 년    월     일

주        소:

상   호   명:

대   표   자:                        (인)

(재)한국장애인문화예술원 이사장 귀하

※ 책임기술자 선임계

보 안 각 서

용  역  명 :	설계용역

계약  일자 : 20 .   .   .

착수  일자 : 20 .   .   .

완수예정일 : 20 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 국가계약법 시행령 제14조 제2항 내지 제3항에 해당하는 입찰관련서류의 열람 또는 교부를 위하여 발주기관이 전자조달시스템에 설계용역계약의 계약목적물인 설계서를 게재할 수 있다는 데에 동의한다.

4. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

5. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

6. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주기관에게 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20 년    월     일

주        소	:

생 년  월 일	:

기 술  분 야	: 참여공종 표기

성        명	:                   (인)

(재)한국장애인문화예술원 이사장 귀하

[붙임 3] 책임기술자 선임계

사 업 [분야별] 책 임 기 술 자 선 임 계

용  역  명 :	설계용역

계약  금액 :

계약  일자 : 20 .   .   .

착수  일자 : 20 .   .   .

완수예정일 : 20 .   .   .

-  아     래  -

가. 성       명 :

나. 주       소 :

다. 생 년 월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20 년    월     일

계 약 자:

주    소:

상    호:

대 표 자:                  (인)

(재)한국장애인문화예술원 이사장 귀하

※ 공동(분담)수급일 경우 대표사 선임계 제출.

※ 하도급 예정 공종은 하도급 승인요청 시 제출.

[붙임 4] 하도급승인 신청서

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제32호 서식] <개정 2016.3.7.>
하도급 계약 승인신청서
1. 건설기술용역명
2. 건설기술용역개요
수급인 (대표회사)	상호		대표자		소재지
3. 건설기술용역개요
계약금액		계약일		준공예정일
금 차 계약금액		금 차 계약일		금 차 준공예정일
4. 공종별 하도급 예정계획(해당연도)
하도급할 주요 공종	하도급 대상자	하도급 용역
공 종	상호 대표자/분야별책임기술자	소재지	등록업종 (보유면허)	하도급 금액 (VAT 포함)
①하도급 부분금액(A)	②하도급 계약금액(B)	③하도급율 (B/A)
구조				-		-
기계				-		-
토목				-		-
조경				-		-
통신				-		-
「건설기술 진흥법」 제35조제4항 및 같은 법 시행규칙 제31조제1항에 따라 하도급 계약 승인신청서를 제출합니다.
20 년 월 일
수급체	대 표	상 호:
대표자:
(재)한국장애인문화예술원 이사장 귀하
첨부서류	1. 하도급 예정 공정표(착수계 설계용역예정공정표로 갈음함) 2. 하도급 승인요청서, 하도급 계약서, 참여기술자 명단 ,자기검토서, 분야별 책임기술자 선임계, 보안각서, 관계서류
1. ①란의 하도급 부분금액은 당해 하도급하고자 하는 용역부분에 해당하는 도급금액으로 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료 및 부가가치세 등을 포함한 금액을 말합니다. 2. ②란의 하도급 계약금액은 수급인이 하도급 대상자(하수급인)와 하도급계약을 맺으면서 지급하기로 계약한 금액을 말합니다. 3. ③란의 하도급율은 하도급계약금액을 하도급부분금액으로 나눈 비율을 말합니다. 4. ①하도급부분금액 및 ③하도급율은 산출이 곤란한 경우에는 기재하지 않습니다.

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보) 일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서				이상 없음
사업자등록증			별첨			제출
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업 진흥법 제2조 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제3조(엔지니어링기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술 진흥법 제21조 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술 진흥법 제21조 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 제2조 별표1	참여기술자 모두 표기
하도급금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙
하도급 사유		건축법 시행령 제91조의3 국가기관용 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제5조(하도급 승인)

※ 하도급대금 지급 및 수령 확인 내역 (전자입금증 또는 전자세금계산서 등 첨부)

하도급대금 지급 및 수령 확인 내역

용역명:	설계용역

구분	원도급자 대금수령			하도급명 (공종)	하도급 대금지급				하도급 대금수령				적정여부	비고
	대금종류	수령일	수령금액 (천 원)		대금종류	지급일	지급금액 (천 원)	지급형태	대금종류	수령일	수령금액 (천원)	수령형태
1
2
3
4
5
6
7

[붙임 5] 실시설계 검사원

실시설계 검사원

용  역  명:	설계용역

계 약 금 액:           원 (금차 :        원)

계 약 일 자: 20  .   .   .

착 수 일 자: 20  .   .   .

완수 예정일: 20  .   .   .

규       모:	연면적	층수	공사비

붙임  제출설계도서 목록  1부

실시설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20 년    월     일

계 약 자:

주    소:

상    호:

대 표 자:

(재)한국장애인문화예술원 이사장 귀하

[붙임 6] 주간업무

주 간 업 무

용 역 명:	설계용역

용역개요
◦현장위치:
◦용역기간: 20 년  월  일 ～ 20 년  월  일
◦계약금액:

용역진행사항

구 분		지난 주 진행사항(~20 . . .)			이번 주 예정사항(~20 . . .)			비 고
업무내용		- 세부적으로 작성. ※ 중간설계 이후부터 공종별로 세부 작성. ※ 관련기관 협의 시 일시, 담당자, 연락처 등 기록. ※ 각종 협의사항 기록.			※ 예정일정 기록.
특이사항		문제점 및 해결책 등 표기
공정률		계획	실적	대비	계획	실적	대비
	현행	%	%	%	%	-	-
	누적	%	%	%	%	-	-

계 약 자:

주    소:

상    호:

대 표 자:

사업책임기술자:	(인)

(재)한국장애인문화예술원 이사장 귀하

[붙임 7] 월간업무 (문서로 제출, 매월 말일 오전10시 이전)

월 간 업 무

용 역 명:	설계용역

용역개요
◦현장위치:
◦용역기간: 20 년  월  일 ～ 20 년  월  일
◦계약금액:

용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비 고
첫째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
둘째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
셋째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
넷째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
다섯째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
다음 달	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기. - 중간설계 시부터 공종별로 세부적으로 작성.	이번달 계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)

계 약 자:

주    소:

상    호:

대 표 자:

사업책임기술자:	(인)

(재)한국장애인문화예술원 이사장 귀하

[붙임 8] 특정자재 설계 목록

특정자재 설계 목록

공 종	품 목	규 격	수량	금액 (천 원)	협의 담당자	연락처	비 고

사업책임기술자 :	확인

※ 1. 관급자재 제외
※ 2. 품목당 100만 원 미만 제외 (자재리스트에 포함)

[붙임 9] 현장조사 체크리스트 (지반조사 전)

사 업 명:

구분	점 검 항 목	설계자검토사항	점검결과
현황 측량	현황측량을 위한 사전조사 여부 (지적도, 도시계획지형지적도, 지적도근점 등)
	측량계획서의 작성 적정성 확인 (계획, 중간, 실시설계 시 측량조사 세부지침 및 계획 등)
	측량기술자의 배치 적정성
	가수준점(T.B.M) 유실 또는 훼손되지 않도록 보존 조치 여부
	측량성과 결과, 표기 및 보관상태 적정성
지장물조사	지장물조사 계획 수립여부.
	지장물조사를 위한 관계서류 열람 확인 여부. (토지대장, 건축물대장, 지적도, 도시계획확인원 등)
	지장물조사를 위한 관계기관과 협의 여부 및 관계자 연락처 및 소속 기록 여부.
	우수관, 오수관 위치 및 깊이 파악 여부.
	상수도관 및 급수 인입관로 위치 조사 여부.
	가스관, 통신관 등 기타 자하매설물 확인 여부.
	지장물조서 및 지하매설물도 작성 여부.
지반 조사 (시추 조사)	지반조사계획서 적정 수립 여부.
	지반조사를 위한 자료수집 확인. (지형도, 지질도, 토양도, 지하수이용현황 등)
	과업지시서에 의한 방법 및 수량 일치 여부. (시추조사 승인서에 의한 방법 및 수량 일치여부)
	시추공 위치 적정성. (시추조사 승인서 위치와 일치여부 확인)
	시추 위치 도면 표기 여부.
	과업지시서에 의하여 적정 실시 여부. (시추조사 승인서에 의하여 적정 실시 여부)
	자연시료채취 방법 확인.
	시추공 내 지하수위 측정 적정 여부.
	표준관입시험 및 실내시험 등 한국산업규격과 일치 여부.
	시료상자의 규격 적정 및 보관방법 적정성. (채취한 시료의 규격(∮)과 길이가 보고서상의 시추규격 및 깊이와 일치여부 확인)

※ 붙임 : 관계서류 및 사진 첨부, 미비사항은 조치계획서 첨부.

※ 지반조사 후 관계자(지반조사분야/구조분야/토목분야/건축분야 참여기술자)협의 후 보고서 제작.

20 년    월     일

점검자  소속:	(인)

입회자  소속:  수요기관	(인)

※ 현장조사 참석자

현 장 조 사  참 석 자

사 업 명 :

일    시 :

참 석 자 :

구 분		소 속	성 명	서 명	비 고
입회자	수요기관
	감독기관
참석자	설계자
	현황측량 참여기술자
	기 타

현 장 조 사  사 진

사 업 명:

[붙임10] 표준설계관리일정표 (기타용역 병행 수행 시 취합하여 작성, 용역기간에 맞추어 변경 및 기타용역내용 포함)