국제미술 기획전 《히토 슈타이얼》전(가제)

전시연출 및 조성용역

과업지시서

2022. 1.

국 립 현 대 미 술 관

- 목   차 -

1. 사업명	1

2. 사업목적	1

3. 사업기간	1

4. 과업내용	1

5. 계약자 선정방법	1

6. 입찰 참가자격	1

7. 과업수행 지침	2

1. 사 업 명: 국제미술 기획전 《히토 슈타이얼》 전시연출 및 조성용역

2. 사업목적: 국립현대미술관이 개최하는 《히토 슈타이얼》에 필요한 전시연출 및 조성, 전시공간 유지보수, 철거

3. 사업기간 : 계약일 ~ 2022. 4. 10.

4. 과업내용

가. 전시회 개요

ㅇ 전시회명 : 《히토 슈타이얼》

ㅇ 주    최 : 국립현대미술관

ㅇ 전시기간 : 2022. 4. 29. ~ 2022. 9. 18.

ㅇ 전시장소 : 국립현대미술관 서울관 2, 3, 4전시실 및 복도공간

ㅇ 작 품 수 : 설치, 영상, 오브제 등 20여 점

나. 작업일정 및 내용

ㅇ 작업내용

- 설치 및 영상작품 설치를 위한 공간연출

- 전시기간 중 연출공간유지 및 보수

ㅇ 작업일정

- 2022. 3. 22. ~ 2022. 4. 10.

ㅇ 공간조성목록 : 작품 17점 연출공간

ㅇ 작업일정

- 연출공간 복구 및 보양 : 2022. 3. 22. ~ 3. 24.

- 연출자재반입          : 2022. 3. 24.

- 공간연출              : 2022. 3. 25. ~ 4. 10.

- 연출공간 유지보수     : 2022. 4. 10. ~ 9. 18.

※ 국립현대미술관의 일정에 따라 일부 변동이 있을 수 있음.

5. 계약자 선정방법 : 제한(총액)경쟁입찰

6. 입찰 참가자격

가.  국가종합전자 조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출마감    일 전일까지 실내건축공사업(업종코드: 4990)으로 등록한 자.

나. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업자 및「소상공인 보호 및 지원에 관한     법률」제2조에 따른 소상공인으로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <중·소기업·소상공인 확인서>를 소지한 자.

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제15조제4항의 규정에 따라

조달청 이외의 관서에 입찰참가자격 등록을 한 업체이어야 하며, 미등록업체는

조달청 국가종합전자조달시스템 홈페이지(http://www.g2b.go.kr)의 이용자

등록안내에 따라 등록합니다.

※ 장비는 장비 목록에 있는 품목 및 세부사항을 반드시 준수해야 합니다.

7. 과업수행 지침

가. 연출조건

ㅇ 전시공간을 구성하는 조성이므로 내부 마감의 정밀성과 관람객 안전을 위한 구조적 안전성을 우선으로 시행한다.

ㅇ 참여하는 모든 근로자는 주40시간 근로시간을 지켜야한다.

ㅇ 전시 관람시간에는 자재 및 공구의 운반은 금지한다.

ㅇ 부재는 반드시 공장제작 하여 현장에서 조립할수 있는 상태로 반입하여야한다.

ㅇ 수급자는 계약일로 부터 2일 이내에 공정계획서와 안전관리계획서(장비사용)를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

ㅇ 수급자는 조성에 사용하는 모든 자재에 대해서 사용전에 견본 등을 발주자에게 제출 승인을 얻어야 한다.

ㅇ 수급자가 조성의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 때에는 미리 발주자의   승인을 받아야 한다. 수급자가 하도급승인 신청을 하는 때에는 발주자가 내용을 검토하는데 필요하여 요구한 자료를 제출 하여야 한다.

ㅇ 수급자는 자재를 현장에 반입하기 전에 자재 반입계획서를 발주자에게 제출하   여 승인을 받아야 한다.

ㅇ 전시 진행 중 문제시에는 언제라도 유지보수 할 수 있어야 한다.

ㅇ 조성 중에는 공정별로 발주자의 중간검사를  받아야 하고, 후속 작업은 선행작업의 중간 검사를 합격한 후에 시행하여야 한다

ㅇ 수급자는 일일작업계획 및 실적 등을 발주자에게 보고하여야 한다.

ㅇ 수급자는 발주자가 현장 관리상 필요하여 제정한 규정이나 요구되는 사항에 대        하여 이를 준수하여야 한다. 수급자는 발주자가 전체 조성의 공정 관리상 필요

하여 요청하는 경우에는 이에 따라 조성을 진행하여야 한다.

ㅇ 수급자는 현장내 안전관리에 적극 협조하여야 하며, 조성중 안전모, 안전화, 안

전조끼(미술관에서 지정)를 착용하지 않았을 경우 현장에서 즉시 퇴출 조치하며

이에 이의를 제기 할 수 없으며, 추후 지연공정은 수급자의 책임으로 한다.

ㅇ 수급자는 발주자가 본 조성에 적당하다고 인정하는 경험과 기술능력을 가진자를 현장 대리인으로 신청하여 현장에 상주 시켜야 한다. 현장 대리인은 조성 전반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

ㅇ 수급자는 조성 착수전에 본 조성에 종사하는 인원의 조직표를 발주자에게 제    출하여 승인을 받아야 한다.

ㅇ 수급자는 본 시방서에 표기되지 않은 사항이 있을 경우에는 기술적 상식상의 품질이 확보될 수 있도록하여야 한다. 수급자는 설계도서에 누락된 사항일지라도 조성의 성질상 당연히 조성하여야 할 경미한 사항은 발주자의 지시에 따라 조성하여야 한다.

ㅇ 수급자는 전시계획에 지장이 없도록 하여야 하며, 전시개막이 원활히 시행할    수 있도록 필요한 협조를 하여야 한다. 수급자는 조성기간 내 조성 완료 후에라도 준공일 까지 현장에서 요구되는 보수작업을 하여야 한다.

ㅇ 도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때 관련조성과 부합되지 아니할 때 또는 의문이 생길 때에는 발주자 해석 및 지시에 따라야 한다.

ㅇ 조성에 사용되는 모든 자재는 K.S표시품이 없을 경우에는 최상급 신품을 사용하

여야 한다. 자재 생산업체가 다수 일때에는 자체품질관리, 생산시설관리규모, 생

산실적이 우수한 업체에서 생산되는 자재를 사용하여야 한다.

ㅇ 수급자는 조성의 시행에 따라 생긴 발생물은 발주자의 지시에 의해서 정리하고,

발생물 조서를 첨부하여 지시한 장소로 운반, 인도 하여야 한다.

ㅇ 수급자는 가설물이나 구조물의 파손 및 기타 조성 수행에 영향을 미치는 사고나

인명의 손상 또는 제3자의 피해를 미치는 사고가 일어났을 때 혹은 그로 인한

사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 하고 발주자에게 즉시 보고

하여야 한다.

ㅇ 수급자가 조성 내용상 불가피하여 야간작업을 하고자 하는 때에는 미리 발주자

에게 승인을 받아야 한다.

ㅇ 진행되는 국립현대미술관 시설의 훼손의 우려가 염려되는 부분은 작업 전 담당

감독관에 보고한 후 감독관의 지시에 따라서 조성을 진행한다.

나. 기타 사항

ㅇ 동 제안서 이외의 사항이 발생할 경우, 미술관측과 업체가 사전 상호        협의하여 조정한다.

※ 제안서 문의처

- 사업담당자 : 국립현대미술관 현대미술 1과 윤해리 (02-3701-9554)

붙임 히토 슈타이얼 전시조성 연출도면 1부.

히토 슈타이얼 전시조성 산출내역서 1부.

히토 슈타이얼 전시조성 시방서 1부.  끝.