제 안 요 청 서
“케이브랜드 해외홍보관 설계 위탁용역”

2022. 04.

Ⅰ. 제안 요청 내역

1. 사업개요

ㅇ 용역명 : 케이브랜드 해외홍보관 설계 위탁용역

ㅇ 사업목적 : 한류와 연계한 케이브랜드(문화․식품․뷰티 등) 해외홍보관 공간 디자인 설계

ㅇ 용역기간 : 계약체결일로부터 2022. 7. 15. 까지(약 2.5개월)

ㅇ 용역비(추정금액) : 금일억일천일백팔십칠만육천구백육십구원(111,876,969원/VAT 포함)

2. 사업내용

ㅇ (사업명) 케이브랜드 해외홍보관 설계

ㅇ (사업기간) 2022년 1월 ~ 2022년 12월

<케이브랜드 해외홍보관 조성개요(안)>

ㅇ 조성위치 : 인도네시아 자카르타 롯데쇼핑애비뉴 GF층 3개 공간

*① M01 (Main Artrium) : 431.23m2, ② GF D-03 (Department Store Area 2) : 348.06m2, ③

Satrio Gate : 233.71m2

*주소 : Jl. Prof. DR. Satrio No. Kav 3-5, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarata Selatan, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta 12940

ㅇ 공사면적 : 전체 1,013㎡(307평)

ㅇ 조성특징 : 쇼핑(관람)객 친화적이고 최첨단 미디어 기술을 적용한 새로운 개념의 한류 홍보관

ㅇ 조성공간(안)

3. 추진 일정(안)

1	위탁용역 업체선정	ㅇ 업체선정 및 계약(협상에 의한 계약)	2022년 4월
2	설계용역	ㅇ 홍보관 조성 설계(기획, 계획, 중간, 실시) ㅇ 도서, 도면 도출	2022년 4~7월
3	조성공사	ㅇ 착공 및 준공	2022년 7~10월
4	시범개관	ㅇ 시범 운영	2022년 10월
5	정식개관	ㅇ 개관식 개최	2022년 11월(예정)

※ 추진 일정은 변동될 수 있음

Ⅱ. 제안 요청 사항

1. 제안요청 내용 및 용역범위

가. 개요

1) 사업부지 : 인도네시아 자카르타 롯데쇼핑애비뉴 內

ㅇ 개략규모 : 공사면적 : 1,013㎡

ㅇ 주요용도 : 쇼핑(관람)객 친화적이고 최첨단 미디어 기술을 적용한 새로운 개념의 한류 홍보관

ㅇ (예정) 시공(공사) 예산 : 약 12.2억원

※ 설계는 시공비 예산 가용범위내에서 설계가 진행되어함

※ 설계 진행단계에서 리모델링 공사규모는 공사비 가용 예산 범위 내에서 조정이 가능하나 발주자 및 롯데쇼핑애비뉴와 충분한 협의 후 진행하여함

2) 사업대상

나. 주요 과업내용

1) 과업개요

ㅇ 홍보관 조성 입지 현장조사 및 환경분석(향후 공사계획을 감안한 설계반영)

ㅇ 관련법규 검토(건축관련 법규, 사업 전 과정 의무적으로 수행하여야 할 행정 인허가 행위 등)

ㅇ 리모델링 공사규모 검토 및 사업 전 과정 비용추정

ㅇ 각 분야별 계획 수립 [건축(리모델링), 구조, 기계설비, 전기통신설비, 소방설비, 친환경, 그리드아이언 및 바튼조정(필요시), 제어시스템 계획 등]

ㅇ 사업 추진 일정 관리(사업추진 프로세스, 추진일정, 사업비 및 마스터 공정표 등)

ㅇ 2022년 10월 개관이 가능한 건축 리모델링 및 시공계획 수립

2) 과업 콘셉트

ㅇ 홍보관 內 쇼핑 및 관람객을 유인할 수 있는 케이브랜드 전시홍보, 프로모션 이벤트 공간 설계

ㅇ 현대적이고 고급스러움을 전달할 수 있는 케이브랜드 특화 미디어존 설계, 향유․체험․놀이․휴식이 가능한 ‘한류 놀이터’((印) Taman Hallyu. (英) K-Playground) 조성계획 수립

ㅇ 관심(Interest)-자극(Excitement)-공감(Sympathy)-경험(Experience)-소비(Consumption)-환류(Feedback) 심리를 이끌어 낼 수 있는 선순환 공간 설계 및 시공

<케이브랜드 해외홍보관 조성 참고 이미지>

Main Artrium & Satrio Gate

다. 제안요청 내용

1) 과업범위에 명시된 기본 및 실시 설계를 위한 조직체계, 사업계획, 사업수행방안 및 관리방안 등 제시

- 인도네시아 현지 협력 업체 활용 방안 제시

2) 참여업체는 현지 주변 환경을 충분히 확인 조사, 숙지하여 제안서 등의 설계계획에 반영

3) 분야별 추진내용

ㅇ 공통사항

- 쇼핑몰 대관규정, 안전사고 방지, 관련 법규 준수

- 홍보관 이미지를 표현할 수 있는 차별화된 디자인 제시 및 아이템 도출하여 제안

- 재난에 대비한 소방용, 비상용, 시설관리용 동선 및 보안상 취약점이 없도록 계획

- 임대기간 이후 원상복구 계획을 반영한 리모델링 계획 수립

ㅇ (설계방향1) 홍보관 시설조성 #1 : Satrio Gate

- 홍보관 관람객 유입동선/유인을 고려한 상징적 공간 및 시설 설계

- 한류 콘텐츠(K-POP 등)의 시각적 효과를 극대화한 감각적 인테리어 설계

- 마실, 여유, 휴식 콘셉트의 테라스型 공간 설계

ㅇ (설계방향2) 홍보관 시설조성 #2 : Main Artrium

- 현대적 미디어 및 디자인 기반의 K-POP 한류 놀이터(Hallyu Playground with K-POP) 설계

- 동적 프로모션 이벤트 개최가 가능한 무대/참여공간 및 시설 설계

- 유입 관람객 및 동선 통제를 위한 레이아웃(가벽) 시설 및 키오스트 반영

- 흥미, 관심, 자극 콘셉트의 시청각(Audiovisual) 카페型 공간 설계

ㅇ (설계방향3) 홍보관 시설조성 #3 : Department Store Area 2

- 케이브랜드 및 상품의 직관적 전시/체험공간 및 시설 설계

- 브랜드 및 상품 체험 촬영/녹음이 가능한 케이브랜드 스튜디오 설계

- 콘텐츠(시각)-뷰티(촉각)-푸드(미각)-관광(체험) 등 선형적 케이브랜드 상품 경험이 가능한 공간 및 시설 설계

4) 단계별 추진내용

ㅇ 기본기획

- 디자인 콘셉트 개념 파악, 프로젝트 요구사항 분석 및 협의, 발주처 의사결정을 위한 전문자료 제공

ㅇ 계획설계

- (기본업무)

· 발주처 요구사항 정리/반영

· 설계지침에 대한 발주처와의 협의

· 공간계획 프로그램 구성(전시홍보, 이벤트 공간, 진입계단 등의 미디어, 전시 디스플레이)

· 주요 건축도면 검토

· 프로젝트 관련 디자이너와의 협의/반영

· 마감재에 대한 정보수집/정리

· 디자인 개발 및 진행(Floor Plan, Elevation, 기본 자재 및 색채 계획, 가구·조명·디스플레이·안전·위생설비 포함 구조물 배치계획,  등)

- (성과물)

· 기본계획서(계획설계도서)

· 공종별 법규 검토서

· 진행과정 도면 및 자료제공

· 투시도 및 모형물(필요시) 제공

ㅇ 중간설계

- (기본업무)

· 설계 반영사항에 대한 발주처와의 협의

· 공간 콘셉트 및 평면계획 확정

· 공간구성 및 전문성이 필요한 공간의 이해

· 기획 및 계획설계 승인에 따른 디자인 개발 및 진행(콘셉트 디자인, Floor Plan, Elevation, 공간별 섹션, 공용부 및 내외부 사인, 각종 구조물 및 조명기구 사양, 기자재 및 색상)

- (성과물)

· 구체적인 추진계획서

· 리모델링 계획서(설계개요,배치,평면,입면,단면계획) 및 구조계획서(필요시)

· 진행과정 도면 및 자료제공

· 주요장비 및 마감재 검토서, 내외부 사인계획도

· 중간설계도서 일체(배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 조감도, 구조도, 기계설비도면, 전기설비도면 등)

ㅇ 실시설계

- (기본업무)

· 계획+중간설계 승인에 따른 공사 가능한 도면 작성(Floor Plan, Elevation, 공간별 섹션, 구조물 및 조명기구 사양, 기자재 및 색상)

· 공사진행을 위한 시방서 작성

· 공사실행을 위한 견적서 작성

- (성과물) 분야별(건축, 기계, 소방, 전기, 통신, 폐기물) 실시설계 도서 제공, Material Book 및 기타자료, 시방서, 견적서

2. 과업보고 및 성과물 제출

가. (설계) 납품 도서

ㅇ 기획, 계획, 중간설계 납품 도서 : 계획, 중간 설계도서 A4, 5부

ㅇ 실시설계 납품 도서

- 설계설명서(완료보고서) 인쇄본 각 5부 및 파일

- 설계도 인쇄본 각 5부(각 공간별 세부도면) 및 파일

- 시방서 인쇄본 각 5부 및 파일

- 각 공사비 산출내역서 인쇄본 각 5부 및 파일

- 일위대가표 인쇄본 각 5부 및 파일

- 단가 및 수량산출조서 인쇄본 각 5부 및 파일

나. 기타

ㅇ 설계도서는 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준” 제6조의 별표2에 의거하여 작성하여 단계별로 제출하여야 한다.

ㅇ 설계납품 도서 등의 규격 및 작성방법 등에 대해서는 발주처의 담당자와 사전 협의후 작성, 제출하여야 한다.

ㅇ 공사비 내역서는 각 공종(건축,기계,전기,통신,폐기물 등)별로 작성하되, 총괄 공사비 분석표를 포함하여 제출한다. 또한 설계도면, 시방서, 내역서 등 설계성과물 내에서 품명과 규격은 일치해야 한다.

* 기재부 계약예규, 예정가격작성준칙 및 산업안전보건관리비 계상기준 적용

ㅇ 공사시방서 또한 각 공종(건축,기계,전기,통신,폐기물 등)별로 작성한다.

ㅇ 설계도면은 각 공종 간 교차 검토하여 모순사항이 없도록 작성한다. 제출형태는 CAD와 PDF의 파일형식으로 제작하여야 하며, 도면 작성 시 상용폰트를 사용하여야 하며, 부득이한 경우에는 폰트를 포함하여 제출한다.

ㅇ 각 단계별 제출서류 목록

번호	항 목	규격	제출시기	제출방법
1	착수신고서 (사업총괄책임자 지정 등)	A4	계약 후 7일내	서신문서
2	사업수행계획서	A4	계약과 동시
3	인․허가 등 행정절차 이행서류	A4	필요시	서신문서
4	각종 회의자료	A4	발생시 마다	성과물
5	공정보고(주간, 월간보고)	A4	(주간)매주 목요일 (월간)매월 5일	관련양식
6	기타 과업내용서에서 정한 사항 (제안된 주요 사항)	A4	발생 시마다	관련양식

다. 과업 일반사항

1) 제안요청서 등은 과업수행을 위한 기본적인 사항 등을 규정하였으며, 이 규정에 명시되지 않은 사항이라도 과업의 원활한 수행을 위해 필요하다고 인정되는 사항은 각종 관련법령 및 지침, 규정 등에 따라 발주처와 협의하여 수행하여야 한다.

2) 우리원 담당자 주요업무

ㅇ 참여기술자의 투입․교체 및 업무수행 등의 근태사항 관리

ㅇ 과업내용에 대한 정기 및 수시 점검 등 과업품질사항 관리

ㅇ 공정부진 시 만회대책 지시 및 조치 등 공정사항 관리

ㅇ 하도급 관련사항

ㅇ 기타 과업수행에 필요한 사항

3) 계약상대자의 주요업무

ㅇ 최신의 기술지식을 바탕으로 제반 기준에 따라 성실하게 계약의무를 완수하여 시공사 등과 클레임이 발생하지 않도록 현장조건에 부합하는 설계를 하여야 한다.

ㅇ 이 과업을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 하며, 그 배상을 담보하기 위해 관련 법 규정에 따라 손해배상보험 또는 공제에 가입하여야 하며, 용역준공 전까지 그 증빙서류를 우리원에게 제출한다.

ㅇ 국토교통부고시 제2017-219호(설계․건설사업관리 등 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령)에 따라 계약금액이 증감된 경우 증감된 순계약금액만큼 보험 또는 공제가입금액을 증액 또는 감액하여야한다. 동 고시에서 정한 계약상대자의 의무를 성실히 수행하여야 한다.

ㅇ 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항, 민원 및 각종 회의사항, 제반문제점과 이에 대한 해소방안 등에 대하여 기록을 유지하고 발주자의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

ㅇ 용역의 참여자의 업무내용(기간, 수행업무)을 적합하게 기록․관리하여야 하며, 발주자가 요구할 경우 관련 자료를 제출하여야 한다.

ㅇ 용역 시행 중 자문이 필요한 경우 해당 학계나 연구기관 등의 전문가에게 자문을 받아 발주자와 협의 후 결정하여야 한다.

ㅇ 용역기간 또는 용역완료 후에도 다음 사항에 대하여는 발생 즉시 계약상대자의 비용부담으로 수정․보완하여야 한다.

- 계약상대자의 귀책에 의한 판단착오, 내용의 누락, 기준적용의 오류 등으로 발생한 모든 설계 오류 및 하자사항

- 용역수행내용이 제 기준에 부적합하거나 현장조사의 부실로 시공의 불합리함이 인정되어 발주자가 요구하는 사항

- 과업수행에는 필요하나, 이 계약조건 및 과업내용서 등에서 누락된 사항 중 통상적으로 인정되는 수준의 사항

- 심의․자문, 인․허가 관계기관 및 전문기관의 의견, 이해당사자(k아트홀 시설운영자)의 의견 등을 검토하여 설계품질 제고를 위해 설계내용을 변경하여야 할 사항

- 설계내용이 기술적 구현능력에 부합되지 않아 현장적용에 불합리한 사항 등의 발생으로 이의 개선을 위해 발주자(시공자 및 상주감리자)가 설계변경을 요청할 경우에는 즉시 조치하여야 하며, 계약상대자의 비용부담으로 처리하여야 한다.

- 시공과정에서 계약상대자의 귀책사유로 인한 설계도서의 오류, 누락사항 처리를 위한 설계변경 통보서 작성, 시공자 및 상주감리자의 설계변경요청사항에 대한 검토 및 의견제출 등 현장 설계변경 사항에 대하여 신속하게 처리하여야 한다.

ㅇ 용역계약일반조건 및 특수조건을 준수하여야 한다.

4) 계약상대자는 설계진행으로 건물규모 등 기타 여건으로 인한 설계 산출 공사비(예정공사비)가 초과하더라도 계약금액의 증액을 요구할 수 없다.

5) 우리원 업무 담당자는 정기 또는 수시 점검을 통하여 설계품질을 확인할 수 있으며, 계약상대자는 지적사항에 대하여는 즉시 시정하여야 한다.

6) 제출된 도서(제안서)는 일체 반환치 않으며 제안서 및 추후 시행되는 중간 및 실시설계 등 모든 저작권은 발주처에 귀속되며, 선정된 업체의 제안서 이외의 설계내용 중 부분적으로 발주처에서 활용할 수도 있으며 이에 이의를 제기하지 아니하기로 한다.

7) 모든 제안내용 등이 특허권, 저작권등 배타적 권리와 관련되었을 경우 사업제안자는 반드시 특허권, 저작권등 배타적 권리의 확보증명 서류를 제출하여야 하며, 분쟁발생시 사업제안자가 민형사상의 모든 책임을 져야 한다.

8) 당 기관의 심사에 따라 1개 업체를 선정할 예정이며 심사결과에 따라 목적에 부합하지 않거나 수준 등이 미흡할 경우 선정하지 않을 수 있다.

9) 참여업체는 모든 제반 법규 및 규정, 지침을 준수하며 법령 등에 의한 각종 인허가 관련업무를 성실히 수행하여야 한다. 관련 법령 등의 저촉 및 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 하며, 이에 관련된 제반비용은 별도로 지급하지 않는다.

10) 각 단계별(계획+중간설계, 실시설계 등) 업무진행은 각 단계별로 발주처의 담당자와 협의 후 진행하여야 한다.

11) 본 사업이 정부의 방침 또는 예산상의 이유 등으로 취소될 경우 계약상대자는 이의를 제기하지 않고 발주처와 협의하여 기성된 부분까지 합의 정산 처리 하여야 한다.

12) 모든 자재의 사양, 품질, 성능은 관련법이나 규정, 지침에서 제시한 기준이상으로 설계하여야 하며, 발주자의 승인을 득한후 사용하여야 한다.

13) 계약 체결후 계약상대자는 설계업무를 총괄 관리 할 수 있는 유자격자를 사업총괄 책임자로 선정하여 발주처에 제출하여야 한다

ㅇ 사업총괄 책임자는 각종 보고회, 기타회의 등에 참석하여 사업진행에 관한 내용설명 및 질의에 답변하고 회의결과를 설계에 적극 반영 하여야 한다.

ㅇ 과업 수행공정 및 설계진행 관련 발주처의 관련자료 등을 별도 요구시 사업총괄관리 책임자는 수시 보고를 하여야 한다.

14) 각종보고 및 회의개최

ㅇ 착수보고 : 계약 후 7일 이내

* 제반서류 제출 : 착수계(공문), 과업수행계획서, 참여인력 명단(주요실적 및 인적사항 기재), 보안각서 등

ㅇ 중간설계 보고 : 2022. 5월중 (진흥원 담당자와 일정협의)_필요시

ㅇ 실시설계 보고 : 2022. 6월중 (진흥원 담당자와 일정협의)

15) 과업 결과에 대한 모든 성과품은 과업 수행자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 기타 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 과업 수행자가 지도록 한다.

16) 계약 변경 조건

ㅇ 천재지변이나 또는 정당한 사유발생으로 과업 범위 변경이 부득이한 경우로서 발주처와 협의하여 발주처에서 승인한 경우

ㅇ 기타 발주처가 필요하다고 인정하는 경우

17) 계약의 해지·해제

ㅇ 본 과업을 수행함에 있어 과업수행자가 계약내용을 위반하거나 발주처의 지시에 따르지 않는 등 정상적인 과업수행이 불가능하다고 판단할 때는 계약을 해지·해제할 수 있으며 이에 대해 어떤 형태로든 보상을 청구할 수 없다.

18) 계약상대자는 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

19) 건설기술진흥법 제35조(발주청이 시행하는 건설기술용역) 및 동법 시행규칙 제31조(건설기술용역의 하도급 승인), 건설기술용역 하도급 관리지침(국토부 고시 제2019-430호)을 준수하여야 한다

20) 기타 과업 수행과정 중 추가적인 인허가 필요시 조속한 시일내 인허가를 득하여야 하며, 설계진행에 관련하여 발생되는 모든 사안에 대하여 적극적이고 능동적으로 임하여야 한다.

21) 업무수행을 위해 정기 및 수시설계 회의를 개최하여야 한다.

22) 발주자는 설계과정에서 필요한 경우 설계변경 및 수정, 보완을 요구할 수 있으며, 설계완료 이후라도 설계도서의 추가적인 보완사항이 있을 경우 추가 비용없이 시행하여야 한다.

Ⅲ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 목차(예시)

Ⅰ. 제안 개요

1. 사업목표 및 범위

☞ 제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 용역에 대한 목표와 범위를 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

2. 제안내용의 특징과 차별성

☞ 투입인력의 우수성, 전문성 등을 기재하시고, 본 용역과 유사한 프로젝트 수행 내용 및 본 용역을 위해 타 기관과 차별화하여 제안하는 내용이 무엇인지 구체적으로 기술해 주세요.

Ⅱ. 사업수행 부문

1. 사업수행체계

☞ 본 용역을 성공적으로 수행하기 위해 조직을 어떻게 구성하고, 운영할 것인지에 대하여 기술해 주세요.

2. 사업수행방안

☞ 본 용역의 주요과업인 케이브랜드 해외홍보관 설계 위탁용역에 대해 어떻게, 무엇을 제공할 것인지 구체적인 방법 및 방안을 기술해 주세요.

Ⅲ. 사업관리 부문

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 일정계획과 사업관리방안을 구체  적으로 기술해 주세요.

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 집행계획을 기술해주세요(필수)

* 작성예시(금액작성금지, 비율만 작성)

항목	예산 내 집행비율
인건비	0%
부스시공	0%
비즈니스 매칭	0%
현장운영	0%
인쇄 및 홍보물	0%
기타 운영비	0%
관리비 및 이윤	0%
합계	100%

* 위표의 항목은 용역 특성에 따라 변경가능

※ 제안서 작성 시 유의사항

- 제안서는 반드시 25Page 이내(표지 제외)로 작성(도표, 그림 등 활용 가능)

해 주시기 바랍니다.

- 제안서  25Page는 요약서가 아니며 구체적인 용역수행 내용 및 결과를 제시해 주세요.

☞ 제안사는 용역수행 결과물을 구체적으로, 알기 쉽게(그림형태 등) 제시하여야 하며, 성공적 결과물을 만들어 내기 위해 필요한 수행방안, 방법 등도 구체적으로 제시하여야 합니다.

- 제안서 목차는 변경, 추가할 수 있습니다.

2. 제안서 작성지침

ㅇ 제안서는 원본 1부, 업체정보 삭제본 1부를 제출하여야 합니다.

- 업체정보 삭제본에는 제안업체가 어디인지 알 수 있는 부분은 삭제해 주시기 바랍니다.

- 제출된 제안서의 편집오류, 누락 등으로 인한 평가 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서는 반드시 25쪽 이내로 작성하되 다음 사항들을 중심으로 기술 바랍니다.

- 제안사가 추진하고자 하는 핵심사항

- 동 사업을 성공적으로 추진하기 위한 제안업체의 사업관리 방안

ㅇ 제안서는 아래 서식에 준하여 아래아한글 또는 MS워드로 작성 부탁드립니다.

(공정한 평가를 위하여 PPT로는 작성하지 말아 주세요.)

Ⅰ.   <13 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.   <12 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.1  <11 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

가.  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

◦  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

<11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

※ 제안서 하단에 쪽 번호 매기기를 꼭 해 주세요.

ㅇ 제안서는 A4 세로 방향으로 작성하여 단면 및 단색으로 작성하되, 부득이한 경우 일부에 한하여 A4 가로방향 작성 또는 기타용지를 사용할 수 있습니다.

※ 제안요청서에 특별히 요청하지 않았음에도 불구하고 컬러 및 PPT로 작성한 제안서를 제출한 경우 기술평가 시 불이익을 받을 수 있습니다.

ㅇ 제안서는 반드시 한국어로 작성되어야 하며, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어 풀이를 기술해 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, ‘~할 수 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~을 고려하고 있다’ 등과 같은 모호한 표현은 제안서의 평가 시 불가능한 것으로 간주되오니 주의해 주시기 바랍니다.

ㅇ 정보시스템의 구축 또는 시설 구축 등 기술적인 설명 자료가 필요한 경우에는 별첨 자료를 제출할 수 있습니다.

ㅇ 별지는 필히 지정된 양식을 준수하여 작성해 주시기 바랍니다.

3. 제안서 효력

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 한국콘텐츠진흥원에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 수행기관으로 선정 시 계약조건으로 간주하게 됩니다.

ㅇ 한국콘텐츠진흥원은 필요에 따라 제안자에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지게 됩니다.

Ⅳ. 선정 및 평가

1. 선정방법

가. 기본방침

ㅇ 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 동 사업을 효율적으로 수행하기 위한 최적의 수행기관을 선정하는 것이 기본방침입니다.

나. 적용규정

ㅇ 진흥원 계약사무처리규칙, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」및 협상에 의한 계약체결 기준(계약예규) 등의 규정을 근거로 추진합니다.

다. 선정절차

입찰공고		입찰서 및 제안서 접수 마감		기술평가(콘진원) + 가격개찰(조달청)		기술 및 가격 협상		최종수행기관 선정		계약 체결
				1단계		2단계		3단계		4단계

1) 1단계 : 제안서 평가 [기술+가격]

ㅇ 기술평가(80점)

- 진흥원에서 평가위원회를 구성(7인 내외)하여 평가기준에 의거 제안서를 평가(서류평가, 질의응답/발표평가)합니다.

- 평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정합니다.

(평가 점수 단위를 소수점 둘째 자리까지, 셋째자리 이하는 절사)

ㅇ 가격평가(20점)

- 협상에 의한 계약체결 기준에 명시된 가격산출 방식에 따라 조달청

(나라장터) 시스템을 통해 개찰합니다.

ㅇ 제안서(기술 및 가격) 평가 결과, 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정하게 됩니다.

- 협상 순서는 협상 적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점 순으로 결정합니다.

- 합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상인 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하며, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 합니다.

2) 2단계 : 협상 실시(원가산정 포함)

ㅇ 종합점수 1위 업체부터 기술협상을 진행하며, 선순위 업체와의 협상에서 합의가 이루어지면 후순위 업체와의 협상은 생략하게 됩니다.

ㅇ 협상을 통한 합의가 이루어지지 않을 경우에는 동일한 기준과 절차에 따라 후순위 업체와 협상을 실시합니다.

2. 평가항목

ㅇ 다음과 같은 평가항목과 비중을 가지고 평가하고 본 사업의 현실과 상황에 맞게 조정될 수 있습니다.

ㅇ 평가항목

평가항목	세부평가내용	배점
수행기관 전문성 (15)	제안 업체가 본 사업을 수행하기 위한 전문성을 갖추고 있는가?	15점
	ㅇ 본 사업을 수행하기 위한 전문 인력을 확보하고 있는가? ㅇ 해당 사업에 대한 전문지식을 갖추고 있는가? ㅇ 본 사업을 수행하기 위한 인도네시아 현지 네트워크는 확보하고 있는가?
사업 이해도 (15)	사업의 목적과 취지에 대하여 정확히 이해하고 있는가?	15점
	ㅇ 본 사업의 목적, 취지, 특성에 대하여 정확히 이해하고 있는가? ㅇ 케이브랜드 해외홍보관 조성 목적과 그 기대효과를 정확히 제시하고 있는가?
사업수행 능력 (30)	사업 수행을 위하여 제시한 사업계획이 구체적이고 실현 가능한가?	30점
	ㅇ 가용 공사비 예산 범위 내에서 설계계획이 적정하게 제시되었는가? ㅇ 설계 공정별 계획이 적정하게 제시되었는가? ㅇ 제안된 설계 계획이 제안요청서 내용과 방향성이 부합되며, 구체적으로 실현 가능한가? ㅇ 제안된 설계 및 시공규모에 따른 공사비 예정금액이 타당하고 적정한가?
사업관리 방안 (20)	제안 내용을 적절히 관리하기 위한 방안을 갖추고 있는가?	20점
	ㅇ 사업 추진 일정과 사업비 집행계획이 합리적으로 제시되고 있는가?
소 계		80점
가격평가 (20)	ㅇ 나라장터 시스템을 통해 재무팀에서 평가 - 입찰 가격 평점산식에 의거 산정	20점
합 계		100점

Ⅳ. 별지서식

서식번호	서식명
별지 제1호 서식	제안서 표지
별지 제2호 서식	일반현황 및 연혁
별지 제3호 서식	참여인력 현황 총괄표 (별도 전산입력도 해야 함)
별지 제3-1호 서식	참여인력 이력사항
별지 제6호 서식	정보 비공개 동의서 (계약체결 시 제출)
별지 제7호 서식	개인정보 수집·이용·제공 동의서
별지 제8호 서식	용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정이 무효화됨을 알려드립니다.

【별지 제1호 서식】

제안서 표지

“케이브랜드 해외홍보관 설계 위탁용역”

제   안   서

접수번호 :

【별지 제2호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사 명	⁂	대 표 자		⁂
사업분야		사업자번호		⁂
주 소	⁂
전화번호	⁂		FAX		⁂
해당부문종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁 (업체정보 삭제본 작성시 계열사 작업수행 내역 등 제안업체를 알 수 있는 항목 전체 삭제)

⁂ 표시된 항목은 업체정보 삭제본 작성 시 공란으로 두시기 바랍니다.

【별지 제3호 서식】

참여인력 현황 총괄표

(제출일 기준)

번호	성명	담당업무	해당분야 근무경력	참여율	비고

- 본 용역에 투입할 전체 인력(채용 예정인력 포함)에 대하여 기재하시기 바랍니다.

- 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재하시길 바랍니다.

＊투입인력이 수행하는 본 용역 포함 모든 용역 등에서 월별 참여율 100% 초과 불가

＊월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

<작성 시 유의사항>

＊참여인력 및 이해관계자리스트는 신청기관과 이해관계가 있는 자가 평가위원으로 선정되지 않도록 하는 용도로 활용하며, 본 총괄표에 기재되지 않거나 잘못된 정보가 기재되어 이해관계자가 평가위원으로 참석할 경우는, 신청기관에게 불이익이 있을 수 있으니 빠짐없이 작성바람

＊서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사제외 및 계약을 파기 할 수 있으며 국가계약법 시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

<세부작성 방법>

＊경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

＊PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

＊채용 예정인력의 경우 현 시점에서 확인할 수 있는 수준에서 정보를 기재

＊지도교수는 대표자 및 책임자가 석사 이상인 경우, 최종학위의 지도교수를 기재해주시기 바라며(석사, 박사 등 학위가 여러개인 경우 모두 기재), 지도교수의 경우 기관명(소속 학교명), 성명, 성별코드만 작성

＊위 참여 인력 현황 총괄표는 사업관리시스템 별도 입력해야 하며, 위에 입력한 내용과 사업관리시스템에 입력한 내용이 다를 경우 평가에서 불이익이 있을 수 있습니다.

【별지 제3-1호 서식】

참여인력 이력사항

※ 사업별로 참여율 기재(입찰 현재 기준 참여인력의 모든 사업 포함)

※ 경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

※ PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

※ 서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사제외 및 계약을 파기 할 수 있으며 국가계약법 시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

※ 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재

※ 월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

성 명			소속			직책					연령
학력	대학 전공					해당분야 근무경력
	대학원 전공					자격증
본 용역 참여임무					사업 참여기간					참여율		%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발 주 처	참여율(%)	비고

【별지 제6호 서식】

정보  비공개  동의서

본인은 귀 원의 『케이브랜드 해외홍보관 설계 위탁용역』와 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 원이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2022.     .     .

상 호(법인명)  :

주        소 :

대   표   자 :                       (인)

사업자등록번호 :

한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제7호 서식】

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’)의 “케이브랜드 해외홍보관 설계” 위탁용역의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 “케이브랜드 해외홍보관 설계”위탁용역 입찰 참여에 따른 입찰서류(별지 제1호 서식 ~ 별지 제6호 서식) 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용. 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등. - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등. - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등. - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등. 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외. 2022년 월 일 한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제8호 서식】

용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

(참여인력 중 소속 외(프리랜서 등) 인력의 경우 작성제출)

○ 성 명
○ 연락처 (전화번호/이메일)
○ 과업 내 참여(담당) 업무
○ 참여 기간	※ 용역 계약기간 중 업무 수행을 위해 참여하는 기간 기입 ※ 시작일 ~ 종료일 형태로 기입
○ 수령 예정 보수(인건비)	※ 총액 또는 개월 당 보수로 기입 ※ 본 용역 예산 내에서 집행 예정인 금액 기준으로 기입

본인은 (용역 계약업체명)과의 정당한 계약 하에

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인합니다.

(참여 당사자)	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)

(용역 계약업체명)은 위의 사람이 해당 업무의 수행을 위하여

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인하며,

정당한 보수를 투명하게 지급할 것을 서약합니다.

(용역 계약업체명) 대표	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)