		과업지시서

「국립한글박물관 파주통합수장센터 건축계획」

과 업 지 시 서

2022. 04.

Ⅰ	과업 개요

과 업 명

국립한글박물관 파주통합수장센터 건축계획

과업목적

국립한글박물관의 수장공간 과밀해소 및 재질별 격납, 과학적 보존환경 구축을 위해 추진하고 있는 국립한글박물관 파주통합수장센터 건립을 위한 건축 기본설계(안)을 분야 전문기관에 위탁하여 전문성을 제고하고자 함

한글과 한글문화의 발전을 위한 역할 및 기능변화 가능성 등을 고려하여 국립한글박물관에 적합한 통합수장센터 건축 구상(안)을 도출하고 관련한 공간 계획(space program)에 따른 건축 설계를 통하여 미래지향적 복합문화공간으로서의 기능 강화 방안을 도출하고자 함

입지적 특성을 고려한 건축 기능 설계를 통하여 주변 지역과의 연계성 강화 및 문화적 가치 확산을 위한 기반을 조성하고자 함

국립한글박물관 파주통합수장센터 건축 기본 설계 계획 수립과 건립에 따른 합리적인 비용을 산출하여 경제타당성의 근거자료를 마련하고자 함

과업기간 : 계약 체결일로부터 210일

과업예산 : 45,000,000원(부가가치세 포함)

과업 내용

부지 현황 조사 및 여건 분석

건립 대상 부지의 입지 여건 조사 및 분석

토지 분석

주변지역 및 인프라 분석

관련 법규 및 사업 검토

건축 방향 설정

각 기능 및 공간 활성을 극대화 할 수 있는 공간 구상 및 연계 체계 설정

기능별 공간 조성 및 기능 구현 적합 건축 규모 설정

건축 설계(안) 수립

단계별 설계 계획(마스터 플랜), 전체 혹은 주요 부분 상세 이미지 포함

토지이용계획, 시설배치계획 및 동선 계획, 공간규모계획 및 교통동선계획, 평면ㆍ입면ㆍ단면 등 건축계획, 공간 기능별 시설 및 장비 시스템 등에 대한 기술적 요건에 대한 검토, 설계 및 건립공사 수행방식 등 단계별 추진계획

개방형수장고 및 일반 수장고 공간 구성 계획(재질별ㆍ유물 특성별 격납 고려)

주변 인프라와 적극 연계한 외부 공간 구상

건축 조감도 작성

건축 비용 산정

비용 산출(건축 규모 산정 및 추정 건축비용 제시)

공종별 공사비 산정

단계별 총 공사비 산정

지침서 작성

공모방식 결정, 설계공모 지침서  등

기재부의 예비 타당성 조사 신청시 자료 대응 및 지원

Ⅱ	과업 세부 내용

건립대상지에 대한 건립환경과 여건 검토 및 분석

파주시 건립 대상 부지입지 여건을 조사하고 및 토지 분석

대상지에 대한 현장 조사

대상지의 위치, 면적, 경사도, 지역지구 지정 여부 등 검토

주변 인프라 분석

주변 지역 및 관광지, 문화기반시설 등을 분석하여 외부 공간 활용 및 진입로 계획 시 적극 활용

관련 법규 및 사업 검토

도시환경 및 접근체계, 교통현황, 건축조건, 법규사항 등 분석

파주통합수장센터 건축기본구상 및 설계(안) 도출

박물관 건축 기본방향 설정

각 기능 및 공간 활성을 위한 구상 및 연계 체계 설정

단계별 계획 수립

파주통합수장센터 시설 구성 및 기본설비계획 제시와 예상 건축규모 산출

일반 수장고, 개방형 수장고, 아카이브실, 보존처리실, 전시 및 교육ㆍ체험실 등 기능별 설비계획 및 규모 산출

개방형수장고 및 일반 수장고 공간 구성 계획(재질별ㆍ유물 특성별 격납 고려)

적정 규모의 재질별 보존처리실 공간 계획

시설 건립을 위한 건축 배치 구성 및 공간계획 이미지 구현 작성

건립 대상 부지에 대한 토지이용계획 기본안 제시(배치/동선/교통 등)

토지이용계획, 시설배치계획, 동선 계획, 교통계획 등

건축사업 추진 계획·로드맵과 이행 절차 및 방안 제시

건축 조감도 작성

파주통합수장센터 건축사업비 산정

각 공종별 공사비 사례조사 및 본 사업 계획안과의 비교·검토

각 공종별 공사비 검토결과를 바탕으로 한 예상 건축사업비 산출

건립사업에 따른 단계별 진행 예상계획 및 공사비 산정

경제성분석을 위한 비용 산정

파주통합수장센터 설계공모지침서 작성

설계, 공사 발주방식 검토 분석

설계공모를 위한 설계지침서 작성

파주통합수장센터 건립사업 추진에 대한 대응 및 지원 업무

지원업무 시 건축계획 부문 공동 대응 및 업무 지원

기재부의 예비 타당성 조사 신청시 필요 자료 공동 대응 및 업무 지원

Ⅲ	과업 수행지침

일반 지침

본 과업은 과업지시서, 본 용역대상자가 한국문화관광연구원에 제시한 과업제안서와 정부가 제정 공포한 제법규, 용역규정 및 한국문화관광연구원의 지시에 따라 시행해야 함

과업수행자는 계약 즉시 작업에 착수하여야 하며, 계약일로부터 7일 이내에 사업수행계획서, 용역수행자 명단 및 이력서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 함

본 과업수행에 참여하는 실무진은 관계분야에 경험이 풍부한 사람으로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 수행될 수 있도록 하며 과업 책임자를 비롯한 과업 수행자의 변경 시 곧바로 한국문화관광연구원에 통지하여야 함

과업 수행 시 세부 추진일정에 대하여는 한국문화관광연구원과 긴밀히 협의한 후 수행하여야 함

본 과업을 수행함에 있어 과업내용의 변경이 필요할 경우에는 상호 협의하여 결정함

본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이더라도 한국문화관광연구원에서 판단하여 필요하다고 인정하는 경우 과업내용을 추가할 수 있으며, 이에 소요되는 경미한 비용은 과업수행자가 부담함

본 과업완료 후 경미한 추가 작업은 과업수행자 부담으로 보완 제출하여야 함

과업지시서에 명기되지 아니한 사항으로 한국문화관광연구원이 필요하다고 인정되는 사항 및 과업지시서에 명기된 사항이나 한국문화관광연구원의 정책변화에 의하여 불가피하게 과업내용을 변경하여야 할 때는 상호 협의하여 결정함

본 과업에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않는 목적으로 사용할 수 없으며, 발주처의 사전승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여할 수 없음

본 용역계약에 의해 수행된 용역의 원자료를 포함한 용역성과품에 대한 지적재산권 일체와 이차적 저작물의 저작권은 일반용역계약특수조건 및 용역계약일반조건에 의하며, 상업적 목적으로는 사용할 수 없음

천재지변 및 불가항력 등으로 과업의 수행이 불가능하거나 과업의 내용, 기간 등의 변경이 불가피 할 경우 상호협의에 의하여 해제 또는 조정할 수 있음

본 용역에 대해서는 정산을 실시하며 계약에 의해 수행된 조사 결과물의 객관적인 품질이 현격하게 떨어진다고 판단될 경우 한국문화관광연구원은 계약을 시정조치 또는 무효로 할 수 있음

보안지침

과업수행자는 본 과업 내용을 보안유지를 하여야 함

모든 성과품은 과업수행자가 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며 타 목적을 위해 사용할 수 없음

기타 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 과업수행자에게 있음

Ⅳ	과업수행의 진행보고

착수보고 : 계약일로부터 7일 이내

보고내용 : 추진일정 등 과업 수행계획 보고

중간보고 : 계약일로부터 100일 이내

보고사항 : 과업 진행상황 및 향후 추진계획 등

보고일자, 내용, 방법 등에 대하여 발주기관과 사전협의

최종보고 : 계약만료일 전 7일 이내

보고사항 : 과업지시서에 명시된 과업결과에 대한 최종보고

보고 전 최종보고(안)를 작성하여 보고내용 및 일자, 방법 등에 대하여 발주기관과 협의

Ⅴ	용역 성과품

착수보고서

제출시기 : 계약 후 7일 이내

포함내용 : 과업수행 계획, 투입 인력, 예산 계획 등

규격 및 수량 : A4 Size, 전자문서, 복사물 2부

중간보고서

제출시기 : 계약 후 100일 이내

포함내용 : 연구결과 보고서 및 계획결과물(작성 중 안)

규격 및 수량 : A4 Size, 전자문서, 복사물 3부

최종보고서

제출시기 : 용역 최종보고 전 10일 이내

포함내용 : 연구결과 보고서 및 자료 분석결과 등 용역 관련 일체내용
(연구결과보고서, 계획결과물 파일, 결과이미지 등)

과업수행자는 용역보고서 제출 전에 반드시 그 내용에 관한 사항을 발주처와 사전협의를 해야 함. 또한 발주처의 요청이 있을 때는 용역내용에 대하여 관계자에게 설명할 의무를 가짐

규격 및 수량 :  A4 Size, 전자문서, 복사본 5부, USB 1부

(전자문서 포함되는 도면 및 이미지는 컬러로 제작하며, 세부 내용 식별 가능하도록 제작)

※ 최종 성과품은 인쇄 보고서와 함께 그에 대한 보고서 파일, Raw Data, 이미지 작업파일 등이 포함된 전자파일 형태로 제출함

※ 모든 성과품의 편집․제작․인쇄 방법 등은 발주부서와 사전 협의함