과 업 지 시 서

사 업 명	(가칭)올바른저작권센터(Allco) 전시·교육체험관 전시설계 및 전시물 제작·설치 감리 용역
주관기관	한국저작권위원회

2022. 7.

구분	소속	직위	담당자	전화번호	이메일
사업책임	홍보전시팀	팀장	박정림	055)792-0311	sociorim@copyright.or.kr
사업담당	홍보전시팀	선임	김대일	055)792-0313	allco@copyright.or.kr

						목 차

Ⅰ. 과업개요	1

1. 과업명	1

2. 과업목적	1

3. 과업기간	1

4. 과업예산	1

5. 계약방법	1

6. 과업범위	2

7. 과업일정	3

8. 추진체계	4

Ⅱ. 과업내용	5

1. 감리대상사업의 설계도서, 설계설명서, 제작도면 등 성과도서 일체의 적정성 검토	5

2. 전시․체험물 제작․설치 관련 실내건축공사에 대한 감리	5

3. 전시‧체험물 제작‧설치 감리	12

Ⅲ. 과업수행지침	14

1. 과업수행조건	14

2. 일반사항	15

3. 감리원의 근무수칙	15

4. 과업수행보고	16

5. 담당자 및 문의처	19

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명

ㅇ ｢(가칭)올바른저작권센터(Allco) 전시․교육체험관 전시설계 및 전시물 제작․설치 감리｣ 용역

2. 과업목적

ㅇ ｢(가칭)올바른저작권센터(Allco) 전시․교육체험관 전시설계 및 전시물 제작․설치｣ 사업의 성공적 완수와 최고의 품질 확보를 위해 한국저작권위원회(이하 ‘위원회’)의 감독관 권한을 대행하여 감리 수행

- 제3자의 관점에서 설계도서 일체에 대한 적정성 검토

- 제반 설계도서, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 검토 또는 확인하고, 품질‧시공‧공정‧안전‧환경‧원가관리 등에 대한 기술지도를 하며, 관계법령에 따라 위원회의 감독 권한을 대행

- 본 과업의 특성, 규모 및 현장조건을 감안하여 시설물의 각 공종마다 설계도서에서 정한 규격 및 치수 등의 검측업무 수행

3. 과업기간 : 착수일로부터 360일

ㅇ 감리용역의 투입 시기 및 기간은 제작․설치 공사 일정에 따라 변동될 수 있음

ㅇ 모든 제작․설치가 완료되었을 경우, 감리용역의 기간은 제작․설치 완료 후 7일 이내로 조정됨

ㅇ 감리기간의 산정은 위원회에서 제시한 내용에 의하되 공사 중지 명령이 있을 경우 당해 감리기간은 제외함

※ 단, 위원회가 인정하는 특별한 사정이 있는 경우에는 감리기간으로 산정함

4. 과업예산 : 총 136,000천원 (부가세 포함)

5. 계약방법 : 제한경쟁/총액입찰/전자입찰/적격심사

6. 과업범위

ㅇ 과업범위는 감리대상사업(전시설계, 실내건축공사 및 전시․체험물 제작․설치 등) 전 분야에 대한 검토․확인․검사 등이며, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 ｢건설기술진흥법｣ 등 관계법령 및 규정을 준용하고, 정하지 않거나 누락된 사항은 위원회와 협의하여 결정함

ㅇ 전시공간, 수장고, 전시․체험물 등 감리대상사업의 설계도서, 설계설명서, 제작도면 등 성과도서 일체의 적정성 검토

ㅇ 전시공간 내 시설물, 전시․체험물, 사인물(설명패널), 모형, 연출조명, 내부 디자인 연출 등 실내건축공사 및 전시․체험물 제작․설치에 대한 감리

〈감리대상사업 개요〉

1. 사 업 명 : (가칭)올바른저작권센터(Allco) 전시·교육체험관 전시설계 및 전시물 제작·설치

2. 사업기간 : 2023년 7월 31일까지(예정)

3. 사업예산 : 2,166백만원

4. 위    치 : 경상남도 진주시 충무공동 15-2

5. 사업범위

가. 물리적 범위

위 치	구 분	층 고(m)	면 적(㎡)
지상 1층	상설전시실	5.1	670
	공용공간(로비, 휴게라운지)	-	-
지상 2층	특별전시공간	4.8	300
지하 1층	수장고	4.8	136
면적 합계			1,106
* 대상면적은 도면에 의한 산출로 다소 변동이 있을 수 있음 * 공용공간(로비, 휴게라운지)은 안내대, 가구, 사인물 등을 통한 인테리어 연출 * 지상 1층·2층 전시공간의 규모는 설계 단계에서 일부 조정될 수 있으며, 사업자는 변경도면을 반영하여 설계·설치하여야 함

나. 과업 범위 : 공간별 전시설계 및 전시․체험물 제작․설치, 프로그램 개발 등

〈감리대상사업 평면도〉

구분		시설 평면도
지상 1층	상설전시실(670㎡) 로비, 휴게라운지
지상 2층	특별전시공간 (300㎡)
지하 1층	수장고 (136㎡)

7. 과업일정

구분	2022						2023
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
o 조달공고 및 계약 체결
o 대상사업, 설계도서의 적정성 검토
o 전시․체험물 제작․설치 감리
o 시운전․준공도서 검토 및 준공검사

8. 추진체계

ㅇ 추진체계도

				문화체육관광부
				사업기획, 예산 총괄 등
	자문기관			한국저작권위원회
	콘텐츠 개발 자문			사업계획 수립, 수행, 관리 등
	조달청						감리사업자
	입찰, 공고, 사업자 선정						설계, 제작‧설치 등 감리
				수행사업자
				설계, 제작‧설치 등 수행

ㅇ 추진역할

	구 분	역 할	비 고
	문화체육관광부	o 사업기획 승인, 예산교부 등 총괄
	한국저작권위원회 (주관기관)	o 사업계획 수립 및 관련 예산(대금) 집행 o 사업자 관리‧감독, 산출물 검수‧확인	사업 주관
	자문기관	o 전시‧체험 콘텐츠 개발 자문	주관기관 별도 예산
	조달청	o 사업 입찰 및 공고, 사업자 선정 o 사업자 계약 체결
	감리사업자	o 대상사업 품질, 시공, 공정, 안전 및 환경관리 o 사업 단계별 결과 및 추진상황 보고 o 기타 위원회의 대리 업무, 수행사업 관리‧감독 등	감리 수행
	수행사업자	o 용역 사업 수행, 현황 보고 및 최종 결과보고 o 산출물 제출 및 유지보수 등	감리대상 사업 수행

Ⅱ		과업내용

1. 감리대상사업의 설계도서, 설계설명서, 제작도면 등 성과도서 일체의 적정성 검토‧확인

가. 설계도서, 설계설명서, 제작도면, 내역서, 계약서 등의 계약내용과 해당 사업의 설계보고서 등의 적정성과 최신 공법 및 예산절감 사항 등의 적정 반영 여부 검토‧확인

나. 해당 사업의 착공 이전에 현장 시공을 중심으로 설계도서 등 계약문서 상호 간의 모순되는 사항, 현장 실정과의 부합여부 등의 적정성 검토‧확인

2. 전시․체험물 제작․설치 관련 실내건축공사에 대한 감리

가. (착공신고서 검토‧보고) 감리원은 수행사업자로부터 착공신고서를 제출받아 계약 내용의 확인, 현장기술자의 적격 여부, 공정예정표, 품질‧안전관리 계획서, 작업인원 및 장비투입 계획 등의 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 위원회에 보고

	□ 착공신고서 내역 시공관리책임자 지정통지서(현장관리조직, 안전관리자), 공사 예정공정표, 품질관리계획서, 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서, 공사 시작 전 사진, 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본, 안전관리계획서, 작업인원 및 장비투입 계획서, 그 밖에 위원회가 지정한 사항 등

나. (현지여건 조사) 감리원은 공사 시작 후 빠른 시일 내에 공사추진에 지장이 없도록 수행사업자와 합동 현지 조사하여 시공자료로 활용하고 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계변경 절차에 따라 처리

다. (현장 정기교육)

1) 감리원은 수행사업자에게 현장에 종사하는 시공기술자의 양질시공 의식고취를 위해 월 1회 이상 현장 정기교육의 시행을 지시

2) 보조감리원, 수행사업자 등이 법‧령‧규칙 등의 지침 내용과 공사현황 등을 숙지하도록 교육을 실시하고 교육 실적을 기록‧비치

라. (감리원의 의견제시 등)

1) 감리원은 당해 사업과 관련하여 수행사업자의 공법 변경요구 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 요구한 날부터 7일 이내에 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 위원회에 보고하여야 하며, 전문성이 요구되는 경우에는 요구가 있는 날부터 14일 이내에 비상주감리원의 검토의견서를 첨부하여 위원회에 보고하여야 함

2) 감리원은 시공과 관련하여 검토한 내용에 대하여 스스로 필요하다고 판단될 경우에는 위원회 또는 수행사업자에 그 검토의견을 서면으로 제시

3) 감리원은 시공 중 예산이 변경되거나 계획이 변경되는 중요한 민원이 발생된 때에는 위원회가 민원처리를 할 수 있도록 검토의견서를 첨부하여 위원회에 보고하여야 함

4) 감리원은 공사와 직접 관련된 경미한 민원처리는 직접 처리하여야 하고, 전화 또는 방문민원을 처리함에 있어 민원인과의 대화는 원만하고 성실하게 하여야 하며 수행사업자와 협조하여 적극적으로 해결방안을 강구‧시행하고 그 내용은 민원처리부에 기록 비치하여야 함

* 다만, 중요한 민원처리 사항이라고 판단되는 경우에는 검토의견서를 첨부하여 위원회에 보고하여야 함

5) 감리원은 위원회가 민원사항 처리를 위하여 조사와 서류작성의 요구를 하였을 경우, 적극 협조하여야 함

6) 감리원은 시공과 관련하여 수행사업자에게 지시를 하고자 할 경우에는 서면으로 하는 것을 원칙으로 하며, 현장 실정에 따라 시급한 경우 또는 경미한 사항에 대하여는 우선 구두지시로 시행하도록 조치하고, 추후에 이를 서면으로 확인하여야 함

7) 감리원의 지시내용은 해당 공사 설계도서 및 설계설명서 등 관계 규정에 근거, 구체적으로 기술하여 수행사업자가 명확히 이해할 수 있도록 지시하여야 함

8) 감리원은 지시사항에 대하여 그 이행상태를 수시로 점검하고 수행사업자로부터 이행결과를 보고받아 기록‧관리하여야 함

마. (현장대리인 등의 교체) 현장대리인 또는 기술자가 해당 현장에 적합하지 않다고 인정되는 경우 수행사업자 대표 및 본인에게 문서로 시정을 요구하고 불응 시 위원회에 그 실정을 보고

	□ 현장대리인 등의 교체 사유 ① 관계 법령에 따른 배치기준, 겸직금지, 보수교육 이수 및 품질관리 등의 법규를 위반하였을 때 ② 감리원과 위원회의 사전 승낙을 받지 아니하고 정당한 사유 없이 해당 현장을 이탈한 때 ③ 고의 또는 과실로 조잡하게 시공하거나 부실시공을 하여 일반인에게 위해를 끼친 때 ④ 계약에 따른 시공 및 기술능력이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성 공정이 예정공정에 현격히 미달한 때 ⑤ 불법 하도급을 하거나 이를 방치하였을 때 ⑥ 기술능력이 부족하여 시공에 차질을 초래하거나 감리원의 정당한 지시에 응하지 아니할 때 ⑦ 감리원의 검사‧확인 등 승인을 받지 아니하고 후속공정을 진행하거나 정당한 사유 없이 공사를 중단할 때

바. (사진촬영 및 보관) 감리원은 수행사업자에게 촬영일자가 나오는 시공사진을 공종별로 공사 시작 전부터 끝났을 때까지의 공사과정, 공법, 특기사항을 촬영하고 공사내용(시공일자, 위치, 공종, 작업내용 등) 설명서를 기재, 제출하도록 하여 후일 참고자료로 활용

* 특별히 중요하다고 판단되는 시설물에 대하여는 공사과정을 동영상 등으로 촬영하고, 디지털파일을 제출받아 수시 검토‧확인할 수 있도록 보관

사. (품질관리)

1) 감리원은 수행사업자가 계약문서(계획서, 절차 및 지침서)에서 정한 품질관리계획대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 검사‧확인 및 관리하여야 함

2) 감리원은 품질관리계획이 위원회로부터 승인되기 전까지는 수행사업자가 해당 업무를 수행하게 하여서는 아니 되며, 수행사업자가 품질관리계획 이행을 위해 제출하는 문서를 검토‧확인 후 필요한 경우에는 위원회에 승인을 요청하여야 함

3) 감리원은 수행사업자가 작성 제출한 품질관리계획서에 따라 품질관리 업무를 적정하게 수행하였는지 여부를 검사‧확인하여야 하며, 검사결과 시정이 필요한 경우에는 수행사업자에게 시정을 요구하고 시정결과를 검사‧확인하여야 함

4) 감리원은 부실시공으로 인하여 재시공 또는 보완 시공되지 않도록 가급적 품질상태를 수시로 검사‧확인하여 부실공사가 사전에 방지되도록 적극 노력하여야 함

5) 감리원은 당해 사업의 설계도서, 설계설명서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자발생 빈도가 높으며 시공 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 중점 품질관리 대상으로 선정하여 다른 공종에 비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회‧확인하여야 함

6) 감리원은 선정된 중점 품질관리 공종별로 관리방안을 수립하여 수행사업자에게 실행하도록 지시하고 실행결과를 수시로 확인하여야 함

7) 감리원은 당해 사업의 품질관리를 효율적으로 수행하기 위하여 공정별 검사종목과 측정방법 및 품질관리기준을 숙지하고 수행사업자가 제출한 품질관리 검사성과를 확인하여야 하며, 검사성과표를 기성검사, 준공검사 등에 활용하여야 함

아. (시공관리)

1) 감리원은 공사가 설계도서 및 관계 규정 등에 적합하게 시공되는지 여부를 확인하고 수행사업자가 작성‧제출한 시공계획서, 시공상세도의 검토‧확인 및 시공단계별 검사, 현장설계변경 여건처리 등의 시공관리업무를 통하여 공사목적물이 소정의 공기 내에 우수한 품질로 완공되도록 철저를 기하여야 함

2) 감리원은 수행사업자가 작성‧제출한 시공계획서를 공사 시작일로부터 30일 이내에 제출받아 이를 검토‧확인하여 7일 이내에 승인하여 시공하도록 하여야 하고, 시공계획서의 보완이 필요한 경우에는 그 내용과 사유를 문서로서 수행사업자에게 통보하여야 함

	□ 시공계획서 내역 현장 조직표, 공사 세부공정표, 주요 공정의 시공 절차 및 방법, 시공일정, 주요 장비 동원계획, 주요 기자재 및 인력투입 계획, 주요 설비, 품질‧안전‧환경관리 대책 등

3) 감리원은 시공계획서를 공사 착공신고서와 별도로 실제 공사시작 전에 제출받아야 하며, 공사 중 시공계획서에 중요한 내용변경이 발생할 경우에는 그 때마다 변경 시공계획서를 제출받은 후 5일 이내에 검토‧확인하여 승인한 후 시공하도록 하여야 함

4) 감리원은 시공 상 필요하다고 판단되는 경우, 수행사업자로부터 시공상세도를 사전에 제출받아 제출한 날부터 7일 이내에 검토‧확인하여 승인한 후 시공할 수 있도록 하여야 함

* 7일 이내에 검토‧확인이 불가능한 때에는 사유 등을 명시하여 수행사업자에게 통보하고, 통보사항이 없는 때에는 승인한 것으로 간주

5) 감리원은 수행사업자로부터 명일 작업계획서를 제출받아 수행사업자와 그 시행상의 가능성 및 각자가 수행하여야 할 사항을 협의하여야 하고 명일 작업계획의 공종 및 위치에 따라 감리원의 배치, 감리시간 등의 일일 감리업무 수행을 검토‧확인하고 이를 감리일지에 기록하여야 함

6) 감리원은 수행사업자로부터 금일 작업실적이 포함된 공사일지 또는 작업일지 사본을 제출받아 계획대로 작업이 추진되었는지 여부를 확인하고 금일 작업실적과 사용자재량, 품질관리 시험회수 및 성과 등이 서로 일치하는지 여부를 검토‧확인하고 이를 감리일지에 기록하여야 함

7) 감리원은 공사현장이 항상 깨끗이 정리 정돈되어 효율적인 시공관리가 되도록 수시로 현장을 확인‧점검하고, 시공이 완료되었을 때에는 준공 전에 수행사업자에게 공사용 가설시설물의 철거, 잉여자재 반출 등 현장을 정리하도록 감리하여야 함

자. (감리원의 공사 중지명령 등)

1) 감리원은 수행사업자가 공사의 설계도서, 설계설명서 그 밖에 관계 서류의 내용과 적합하지 아니하게 시공하는 경우에는 재시공 또는 공사 중지명령이나 그 밖에 필요한 조치를 취하고 위원회에 보고하여야 함

* 다만, 경미한 시정사항 및 재시공은 보고 생략 가능

2) 감리원은 재시공 또는 공사 중지명령을 하였을 경우, 위원회가 공사 중지 사유가 해소되었다고 판단되어 공사 재개를 지시할 때에는 특별한 사유가 없으면 이에 응하여야 함

3) 감리원은 수행사업자가 재시공, 공사 중지명령 등에 대한 필요한 조치를 이행하지 아니한 때에는 수행사업자에 대한 제재조치를 취하도록 위원회에 요구하여야 함

차. (공정관리)

1) 감리원은 해당 공사가 정해진 공기 내에 설계설명서, 도면 등에 따라 우수한 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 공정관리의 계획수립, 운영, 평가에 있어서 공정진척도 관리와 기성관리가 동일한 기준으로 이루어질 수 있도록 감리하여야 함

2) 감리원은 공사 시작일로부터 30일 이내에 수행사업자로부터 공정관리 계획서를 제출받아, 제출받은 날부터 14일 이내에 검토하여 승인하고 위원회에 제출하여야 함

3) 감리원은 일정관리와 원가관리, 진도관리가 병행될 수 있는 종합관리 형태의 공정관리가 되도록 조치

4) 감리원은 공사의 규모, 공종 등 제반여건을 감안하여 수행사업자가 공정관리업무를 성공적으로 수행할 수 있는 공정관리 조직을 구성하고 있는지 검토‧확인하여야 함

5) 감리원은 수행사업자로부터 전체 실시공정표에 따른 월간, 주간 상세공정표를 사전에 제출받아 검토‧확인하여야 함

6) 감리원은 매주 또는 매월 정기적으로 공사진도를 확인하고 예정공정과 실시공정을 비교하여 공사의 부진 여부를 검토

7) 감리원은 공정진척도 현황을 최근 1주일 전의 자료가 유지될 수 있도록 관리하고 공정지연을 방지하기 위하여 주 공정 중심의 일정관리가 될 수 있도록 수행사업자를 감리하여야 함

8) 감리원은 주간 단위의 공정계획 및 실적을 수행사업자로부터 제출받아 검토‧확인하고, 필요한 경우에는 수행사업자의 시공관리책임자를 포함한 관계 직원 합동으로 금주작업에 대한 실적을 분석‧평가하고, 공사추진에 지장을 초래하는 문제점, 잘못 시공된 부분의 지적 및 재시공 등의 지시와 재발방지대책, 공정진도의 평가, 그 밖에 공사추진 상 필요한 내용의 협의를 위한 주간 또는 월간 공사 추진회의를 개최하고 그 회의록을 관리하여야 함

9) 감리원은 공사 진도율이 계획공정 대비 월간 공정실적이 10% 이상 지연되거나, 누계공정 실적이 5% 이상 지연될 때에는 수행사업자에게 부진사유 분석, 만회대책 및 만회공정표를 수립하여 제출하도록 지시

10) 감리원은 수행사업자가 제출한 부진공정 만회대책을 검토‧확인하고, 그 이행 상태를 주간단위로 점검‧평가하여야 하며, 공사추진회의 등을 통하여 미조치 내용에 대한 필요대책 등을 수립하여 정상 공정으로 회복할 수 있도록 조치

11) 감리원은 검토‧확인한 부진공정 만회대책과 그 이행상태의 점검‧평가결과를 감리보고서에 수록하여 위원회에 보고

12) 감리원은 수행사업자의 요청 또는 감리원의 판단에 따라 수정공정 계획을 수립할 경우에는 수행사업자로부터 수정 공정계획을 제출받아 제출일로부터 7일 이내에 검토하여 승인하고 위원회에 보고

13) 감리원은 수정 공정계획을 검토할 때에는 수정목표 종료일이 당초 계약종료일을 초과하지 않도록 조치하여야 하며, 초과할 경우에는 그 사유를 분석하여 감리원의 검토안을 작성하고 필요시 수정 공정계획과 함께 위원회에 보고

카. (안전관리) 감리원은 공사의 안전 시공을 위해서 안전조직을 갖추도록 하고 안전조직은 전시물 제작‧설치 현장에 맞추어 구성하며 동시에 ｢산업안전보건법｣에 명시된 업무가 수행되도록 조직을 편성

타. (기성검사) 감리회사는 소속 비상주 감리원 중 고급감리원 이상인 자를 검사자, 입회자로 임명하고 수행사업자 또는 그 현장대리인 등을 입회하도록 하여 계약서, 설계설명서, 설계도서, 기타 관계서류에 따라 다음 사항의 검사를 시행

1) 설계도서대로 시공되었는지의 여부

2) 사용된 자재의 규격, 품질에 대한 시험 실시 여부

3) 시험기구의 비치와 그 활용도의 판단

4) 지급자재의 수불 상태

5) 매몰 부위 및 주요 시공 과정 사진

6) 기성검사원에 대한 사전 검토의견서

7) 품질시험, 검사성과총괄표 내용

8) 기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

파. (준공검사) 감리원은 수행사업자 또는 그 현장대리인 등을 입회하도록 하여 계약서, 설계설명서, 설계도서, 도급내역서 등에 의거한 다음 사항의 검사를 시행

1) 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부

2) 상주감리원이 비치한 제 기록에 대한 검토

3) 폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정 여부

4) 지급자재의 사용 적부와 잉여자재의 유무, 처리의 적정 여부

5) 제반 설비의 제거 및 원상 복구 정리 사항

6) 감리원의 검토의견서

7) 기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항

하. (시운전) 감리원은 수행사업자로 하여금 시설‧장비 등의 시운전이 가능한 경우에는 준공 이전에 정상상태 시운전을 완료토록 하되, 정상상태에서 시운전이 불가한 경우 예비 시운전만 시행하고 정상상태에서의 시운전은 위원회와 협의 후 별도의 기간을 정하여 실시

3. 전시‧체험물 제작‧설치 감리

가. 설계‧제작도면 및 내역서 검토‧확인

나. 형태, 크기, 재질, 동작, 색상, 수량, 기계작동 등의 검사

다. 사인물(실별 타이틀 디자인, 텍스트 패널, 이미지 그래픽 등) 제작‧설치의 적정성 여부 검사

라. 전시 진열장과 전시 받침대(전시 보조대 포함), 휴게라운지 가구 등의 설계‧제작도면 및 내역서에 따른 제작‧설치의 적정성 여부 검사

마. 전시‧체험 조명 설계에 따른 천장, 바닥, 벽체 디자인과 조명기구 설치의 적정성 검사

바. 수장고 내 자료 보존‧관리 환경 조성(수장고 벽면‧바닥‧방화문 설치, 자료정리대 등 수장고용 관리 기자재 및 집기류 등 수장고 내 필요물품) 적정 여부 검사

사. 기타 성공적인 전시‧체험 공간 조성 및 시설 운영‧유지관리에 필요하다고 판단되는 사항의 검사

Ⅲ		과업수행지침

1. 과업수행조건

가. 감리회사는 착수부터 완료시까지 관계법령이 정하는 바에 따라 배치기준의 자격 이상인 자를 감리원으로 배치하여야 한다.

나. 감리회사는 전시설계 및 전시물 제작‧설치 사업의 성과도서 검토 및 시공감리를 수행할 수 있는 사업총괄책임자를 선정하여 위원회에 보고하여야 하고, 사업총괄책임자는 위원회와 협의하여 감리업무를 수행하여야 한다.

다. 감리회사가 검토한 설계도서상의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장이 예상되는 경우에는 즉시 위원회에 보고하여야 한다.

라. 모든 전시‧체험물(모형, 패널 등)의 제작도면에 대하여 위원회와 협의하여 적정성을 검토하고, 감리업무를 수행하여야 한다.

마. 과업수행 중 정책 변경 등 불가피한 사유 발생 시 위원회는 본 과업의 일부 또는 전부를 변경‧중지할 수 있다.

바. 감리회사는 과업을 수행함에 있어 요구되는 관련 법규를 준수하여야 하고, 관련 법령 등의 저촉 또는 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에 대한 책임은 감리회사에 있다. 또한 이에 관련된 제반비용은 별도로 지급하지 않는다.

사. 위원회는 중요한 사안의 결정을 위하여 회의를 소집하거나 자문을 받도록 감리회사에 요구할 수 있고, 감리회사는 이에 대한 자문결과를 보고서로 제출하여야 한다.

아. 전시설계 및 전시물 제작․설치 감리 용역 수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 감리회사에 있다.

자. 감리회사는 전시물 제작‧설치 공사기간 동안 상주 감리원을 1인 이상 배치하여야 하며, 감리원 상주비용은 감리회사가 부담한다.

2. 일반사항

가. 착수신고서 제출 시 포함된 참여인력은 특별한 사유가 인정되지 않는 한 교체할 수 없다.

나. 위원회는 참여인력이 업무추진 능력이 없다고 인정되거나 성실히 그 의무를 다하지 않을 경우에는 감리회사에 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 감리회사는 특별한 사유가 없는 한 해당자를 교체하여야 한다.

다. 본 과업은 관련된 건축, 소방, 전기, 통신, 기계 등과 밀접한 협조체계를 이루어야 하며, 각 전시물(모형, 패널 등) 분야별 전문가는 서로가 긴밀한 협조체계를 유지하여 사업의 일체성을 확보하여야 한다.

라. 전시‧체험물은 건축과 관계된 구조나 기타 안전성 확보여부, 전시물 하드웨어 및 소프트웨어 유지‧보수‧사후관리의 용이성 등을 확인한다.

마. 특수장비, 핵심부품, 해외의 완성전시품 등의 현장반입 시 절차, 소요기간 및 관계서류 목록을 제출받아 위원회와 도입여부를 협의하여야 한다.

바. 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 전시‧체험물의 경우 종합적인 안전대책을 수립하여 위원회에 제시하여야 한다.

사. 과업을 수행하는 데 있어 제반 과업에 필요한 조사‧수집 경비는 감리회사가 부담한다.

아. 과업수행에 필요한 자료를 인용할 경우, 그 출처를 반드시 명기한다.

자. 반입되는 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품 또는 시중 최고품이 사용될 수 있도록 한다.

3. 감리원의 근무수칙

가. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어 위원회와의 계약에 의하여 위원회의 감독업무를 대행한다.

나. 감리원은 관계법령과 이에 따른 명령, 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며 신의와 성실로서 업무를 수행하여야 하며, 품위를 손상하는 행위를 하여서는 안 된다.

다. 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안 된다.

라. 감리원은 전시‧체험물 제작‧설치 사업의 품질향상을 위하여 기술개발 및 보급에 전력을 다하여야 한다.

마. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 본 사업의 계약문서, 감리과업내용서, 기타 관계규정 등의 내용을 숙지하고 당해 사업의 특수성을 파악한 후 감리업무를 수행하여야 한다.

바. 감리원은 수행사업자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나, 기일 연장 등 계약조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 안 된다.

사. 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는 수시로 위원회에 보고하고 지시를 받아 업무를 수행하여야 한다. 다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 시에는 먼저 적절한 조치를 취한 후 즉시 위원회에 보고하여야 한다.

아. 감리회사 대표자 및 감리원은 당해 사업시행 중은 물론 사업이 종료된 후라도 감사기관의 수감요구 및 문제발생으로 위원회의 출석요구가 있는 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해발생으로 피해자가 소송 제기시 국가지정 소송업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

4. 과업수행보고

가. 감리원은 위원회로부터 사업과 관련하여 지시를 받았을 경우에는 다음과 같이 처리하여야 한다.

1) 그 내용을 기록하고 신속히 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행결과를 점검‧확인하여 위원회에 서면으로 조치결과를 보고하여야 한다.

2) 감리원은 해당 지시에 대한 이행에 문제가 있을 경우에는 의견을 제시할 수 있다.

3) 감리원은 각종지시, 통보사항 등을 감리원 모두가 숙지하고 이행에 철저를 기하기 위하여 교육 또는 공람시켜야 한다.

나. 감리원은 수행사업자가 제출하는 다음의 문서에 대하여 검토하고 필요시 의견을 첨부하여 위원회에 보고하여야 한다.

1) 착공신고서 및 시공계획서

2) 공사 기성부분 검사원 및 준공 검사원

3) 현장실정보고서

4) 주간공정보고 및 월간공정보고

5) 예산지출 계획 및 실적 내용 주‧월간보고

6) 하도급 통지 및 승인신청서

7) 기타 시공과 관련되는 보고 및 신청서

다. 감리회사는 감리용역 착수 시 다음 각 호의 서류를 첨부한 착수신고서를 작성하여 착수일로부터 15일 이내에 제출하고 위원회의 승인을 받은 후 진주 본부에서 착수보고회를 개최하여야 한다.

1) 착수계

2) 감리원 배치계획서(등급, 경력, 기간, 일정, 역할 등 포함)

3) 감리업무 수행계획서

	□ 감리업무 수행계획서 작성 ① 감리업무 수행계획서는 전체감리업무와 세부감리 업무 수행계획을 위원회의 요구 및 계약내용에 따라 작성하여 제출한다. ② 감리원의 구성은 과업지시서에 기술된 내용에 의거, 관련분야 기술자로 구성한다.

4) 감리비 산출내역서

5) 감리원 지정신고서와 감리원의 경력사항 확인서

6) 설계도서 검토 후 각 공종별 문제점에 대한 의견

7) 보안유지에 대한 이행각서

8) 기타 위원회가 지정한 사항 및 서류

라. 감리원은 사업추진내용 및 공정현황, 문제점 및 대책을 포함한 주간, 월간보고를 정기적으로 개최하여야 하며, 대면보고를 원칙으로 한다.

마. 감리원은 감리업무를 수행하는 동안 기록 관리와 보고를 철저히 이행하여야 하며, 다음 각 호의 문서를 항상 작성‧비치하고 위원회 등의 관계자 요구가 있을 경우에는 이를 제시하여야 한다. 사업종료 시 준공과 동시에 위원회에 인계한다.

	□ 감리기록 비치 서류 ① 감리업무일지 ② 근무상황부 ③ 위원회의 공문서 ④ 공정계획표 및 단계별 공정관리내용 ⑤ 설계변경내용 관리현황 ⑥ 작업지시부 ⑦ 공사기록부 ⑧ 기자재 품질검수부 ⑨ 각종 시험성적표 및 검측서류 ⑩ 폐기물처리, 친환경제품 활용내용 등 환경보존을 위한 관리현황 ⑪ 건설기술자, 하도급자, 시공참여자 관리현황 ⑫ 공사관련 회의록 ⑬ 공사진행 사진첩 ⑭ 각종 보고서 ⑮ 기타 감리원이 필요하다고 판단하는 서류

바. 문서수발 및 기록은 다음의 사항에 유의하여 관리하여야 한다.

1) 문서는 성질별로 분류하고 서류가 손실되지 않도록 보관

2) 문서접수대장 및 발송대장 비치

3) 각종지시, 통보사항 및 회의자료 등을 감리원이 숙지하여 공람

4) 현지조사 보고사항은 그 내용을 구체적으로 작성하여 현장을 답사 하지 않고도 현황을 파악할 수 있을 정도로 명확히 기록

5) 지시사항은 그 이행상태를 수시 점검하고 서면으로 결과 보고

6) 감리일지는 항목별로 수행업무 내용을 6하 원칙에 의거하여 기록

사. 감리원은 다음의 경우 적절한 임시조치를 취하고 상세한 경위 및 의견을 지체 없이 위원회에 보고하여야 한다.

1) 천재지변 및 기타의 사고로 사업의 시행에 지장이 있거나 예정된 사업일정을 준수할 수 없을 때

2) 수행사업자가 정당한 사유 없이 공사를 중단할 때

3) 수행사업자에게 계약에 따른 시공능력이 없다고 인정되거나 기성공정이 예정공정에 미달될 때

4) 수행사업자가 사업시행에 불성실하거나 감리원의 정당한 지시에 응하지 않을 때

5) 수행사업자가 감리원과 위원회의 승인 없이 사업의 전부 또는 일부를 하도급 주거나 재위임할 때

6) 공사에 사용될 중요 기자재가 규격에 맞지 아니할 때

7) 위원회로부터 별도 검토보고의 지시가 있을 때

아. 사업수행자가 기성부분 검사원을 제출하였을 때 감리원이 기성내역과 실제 시공현황을 비교 검토하여 적정한 기성고를 사정하여야 한다.

자. 감리원은 수행사업자로부터 기성부분 검사원 및 내역서를 접수한 경우에는 검토‧확인 후 감리조서를 작성하여 감리회사 대표자에게 다음 서류를 구비하여 보고하고, 위원회에 제출하여야 한다.

1) 공사에 사용한 재료의 품명, 품질, 규격, 물량 등에 관한 서류

2) 시공 후 매몰부분에 대한 감리원의 검사기록서류 및 시공단계의 사진

3) 품질기록(품질시험성과 포함)

4) 안전관리 점검 총괄

5) 자재의 반입량, 사용량, 보관량으로 구분 작성

6) 위원회 또는 감리단이 필요하다고 요구하는 서류

차. 감리원은 수행사업자로부터 준공검사원을 접수한 때에는 계약서, 설계설명서, 설계도서, 도급내역서(원가‧산출내역서) 등 기타 관계서류의 내용대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하여야 한다.

카. 감리원은 검사요청을 받은 날로부터 8일 이내에 사업의 검사를 완료하고 검사조서를 작성하여 검사완료일로부터 3일 이내에 검사결과를 소속 감리회사 대표자에게 보고하고, 위원회에 제출하여야 한다.

타. 감리원은 준공 후 10일 이내에 완료보고서를 제출하여야 하며 보고서 내용은 감리업무 수행과정에서의 기술검토 사항, 감리자, 준공사진 등을 포함한 종합보고서 형식이어야 한다.

파. 감리회사는 제출한 완료보고서의 위원회 승인 후 7일 이내에 진주 본부에서 완료보고회를 개최하여야 한다.

5. 담당자 및 문의처

가. 담당자 : 홍보전시팀 김대일 선임

나. 연락처 : 055-792-0313, allco@copyright.or.kr