「올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사」설계용역

과 업 설 명 서

2022. 09.

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업명	1

2. 과업목적	1

3. 과업개요	1

4. 과업범위	2

제2장 과업의 내용

1. 과업 기본방향	6

2. 과업수행 일반지침	7

3. 과업 수행 중 단계별 제출서류	10

4. 업무보고 및 회의	12

5. 관급자재의 선정	14

6. 에너지절약형 건축물 설계	14

7. 장애물 없는 생활환경 인증	15

8. 설계의 경제성 등 검토 (설계VE)	15

9. 보안성 검토	16

10. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	16

11. 기술제안 입찰안내서	16

12. 지반조사 및 측량조사	16

13. 수요기관의 설계 검토요청 사항 반영	25

제3장 과업수행 지침

1. 일반사항	26

2. 사전조사 검토사항	27

3. 설계범위	28

4. 분야별 세부계획	29

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통사항	40

2. 계획설계	40

3. 중간설계	42

4. 실시설계	48

5. 지반조사 및 측량조사	56

제5장 특기사항

1. 특기사항	58

제6장 설계도서 납품요령

1. 계획설계 납품도서	59

2. 중간설계 납품도서	59

3. 실시설계 납품도서	60

4. 지반조사 및 측량조사	61

5. 설계용역 시행 및 절차 이행	61

〔붙임 1〕 보안각서	63

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계	64

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	65

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원	67

〔붙임 5〕 주간공정보고	68

〔붙임 6〕 월간공정보고	69

〔붙임 7〕 특정자재사용리스트	70

〔붙임 8〕 표준설계관리일정표	71

〔붙임 9〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식	73

〔붙임 10〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표	73

Ⅰ	총 칙

과업명 : 올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사 설계용역

과업목적

○ (기능회복) 노후화로 기능 상실된 경기장을 국제규격 사이클 경기장으로의 활성화

○ (올림픽 유산 가치 증대) 증가하는 체육·공연 등의 문화수요 반영

○ (스포츠·문화 복합공간 건립) 효용성 증대로 수익성 개선을 통한 지속가능성 확보

과업개요

가. 대지위치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내 벨로드롬

나. 사업규모 및 내용 [기본계획(안) 반영 내용 기준]

1) 대지면적 : 전체 580,852.80㎡

2) 건축면적 : 전체 70,822.60㎡ (벨로드롬 : 15,989.80㎡)

3) 연 면 적 : 전체 155,950.70㎡ (벨로드롬 : 26,208.68㎡)

4) 규    모 : 지하 1층, 지상 3층

5) 주 용 도 : 문화 및 집회시설 (자전거경기장)

6) 건 폐 율 : 전체 13.63% (법정 : 20% 이하)

7) 용 적 률 : 전체 22.26% (법정 : 50%이하)

8) 주차대수 : 전체 2,018대

9) 좌 석 수 : 약 6,184석

10) 트랙재원 : 길이 250m / 폭 8m/ 반경 25m

11) 구    조 : 철근콘크리트조, 철골조

다. 예정 공사비 : 37,500백만원(부가세 포함)

1) 공사비는 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 공연, 내부환경개선, 안전관리비, 폐기물 처리 등이 포함된 대한 총공사비 이다. (단, 기획재정부 총사업비 협의 등 발주기관의 사정에 따라 공사비는 변경될 수 있으며, 공사비 증가에 따른 용역금액 변경 없음)

2) 낙찰차액을 감안해서는 안 됨

3) 기재부 총사업비 협의 등 발주기관의 사정에 따라 공사비 변경예정이며, 공사비 증가에 따른 설계비용 변경 없음

라. 공사기간 : 22개월 예정 * 설계내용에 따라 재산정 예정

1) 위 사항은 공사 불가능 기간(동절기, 집중호우 기간, 주52시간 근로시간, 기후특성(한파, 폭염, 미세먼지) 등)을 감안하여 검토 뒤 발주기관의 협의에 따라 변경될 수 있음

마. 과업기간 : 착수일로부터 360일(공휴일 포함, 계획 및 중간설계 180일, 실시설계 180일)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 계약상대자는 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

-「용역계약일반조건」 제16조 과업내용의 변경 및 제30조 사정변경에 의한 계약의 해제 또는 해지

- 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

- 수요기관의 사업비 조달계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

※ 본 용역은 기본설계 기술제안 추진에 따라 계획 및 중간설계 기간 내 국토부 심의 및 입찰안내서 작성기간을 포함하며, 기본설계 기술제안 확정 결과에 따른 사업계획 변경 시 실시설계 여부 및 기간은 조정될 수 있다.

과업범위

가. 본 과업의 수행순서는 계획설계, 중간설계 및 실시설계로 구분 시행하며 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 한다. 본 과업설명서는 “올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사 설계용역”(건축, 토목(현황조사 포함), 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 시설개선 등)의 용역과업에 적용하고 성과품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계 각 단계별 완료 시 제출한다.

나. 계획설계

1) “계획설계”라 함은 국민체육진흥공단(이하 “본 발주기관”이라 함)으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계임

2) 본 발주기관에서 제시하는 운영계획, 소요면적 등 과업내용서, 각종 자료를 토대로 하여 건축사 창의로서 실 배치 평면, 개략 공사비, 공사기간 등 기본적인 내용의 계획을 입안한 계획 설계를 본 발주기관와 협의한 후 관계법령에 적합하도록 기본설계 도서를 작성하여야 함

- 현장조사 결과 및 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시

- 대지 내 동선계획, 내부 실별 조닝계획

- 개략 평면, 입면계획, 조경계획

- 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항

3) 계획안은 3개 이상 작성하여 제출하며, 제출되는 도면은 배치계획도, 평면도, 약식 조감도 등을 패널로 제작하여 스터디 모형과 함께 제출하여야 함

다. 중간설계

1)“중간설계(「건축법」제11조(건축허가) 제3항에 의한 기본설계 도서를 포함함. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계임

2) 계획설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 설계도서에 표기하는 것으로 건설기술진흥법령, 건설업법령 및 각종 규정 등에 위배되지 않아야 하고 상기 법령에 의한 심의 또는 검토, 보완 요구시는 이에 응하여야 함

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공종별로 작성되어야 하며, 주요 기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계 기준을 제시하여야 함

4) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부하도록 함

라. 실시설계

1)“실시설계"라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시한다.

2) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 각종 기술심의, 실시계획인가(협조), 필요시 문화재 현상변경 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출해야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로 설명하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함.

3) 설계 납품 후 물가 및 노임상승 등의 사유가 발생되어 본 발주기관의 요구가 있을 시 공사발주 전까지 새로운 설계내역서를 작성 제출하여야 한다.

마. 인·허가(협의) 사항

1) 계획 및 중간설계 완료 전 도시계획시설변경결정 및 실시계획변경인가(향후 증축예정인 체육박물관을 포함하여 운동장 전체에 해당함) 도서작성 협조 및 인허가 이행에 협조한다.

2) 실시설계 완료 전 건축관련 각종 심의(경관, 좋은 빛 등)와 인·허가를 수행한다.

3) 또한, 관련법상 인증 및 문화재 현상변경에 대한 협의 및 수행하고 교통영향평가 등 각종 평가시 협의자료 작성 등을 완료하여야 한다.

4) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 계약상대자가 대행하여야 한다.

5) 계약상대자는 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

6) 계약상대자는 인허가 업무를 수행하며, 이로 인해 발생하는 제반업무 및 관련비용은 계약상대자 부담하여야 한다.

7) 계약상대자는 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

바. 설계 추진에 필요한 설계 안전성 검토, 조달청 적정성 검토 , 설계VE용역(필요시) 등 설계와 관련한 각종 용역진행에 대한 업무 협조(회의참석, 자료제출, 용역 결과의 설계반영 등)

1) 본 용역은 “조달청 건축설계용역 평가지침” 및 “건설기술용역 및 시공 평가지침(국토교통부 고시)”에 의한 설계용역 평가 대상이다.

2) 설계공모 시 심사위원이 작성한 당선 안 지적사항을 설계 시 반영 및 조치 결과보고를 제출한다.

3) 관급자재 선정을 위한 관급자재리스트 및 관급자재 선정 검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

4) 공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간(예정공정표 포함) 산출

사. 대형공사 입찰방법 심의자료 및 입찰안내서 작성 등

1) 당선자는 국토교통부 “대형공사 등의 입찰방법 심의기준”에 따라 기술제안 추진을 위한 심의자료를 작성하여야 한다.

2) 기본설계 기술제안 확정 시, 당선자는 기본설계 기술제안 등의 공사입찰과 관련하여 입찰안내서 및 과업설명서를 작성하여야 한다.

3) 실시설계 기술제안 확정 시, 당선자는 실시설계 기술제안 등의 공사입찰과 관련하여 입찰안내서 및 과업설명서를 작성하여야 한다.

아. 각종 위원회 자문･심의, 민간전문가(공공건축가) 자문, 주민 참여 및 주민설명회, 설계보고회 및 수시보고 등에 대한 업무를 수행하여야 한다.

자. 국·내외 자료수집 : 국내 외 최신의 우수사례를 벤치마킹하여 우수한 계획사례 및 기술을 기본 및 실시설계에 반영하여야 한다.

차. 지반조사 및 측량조사 : 조사구간의 지반 구성상태 및 각 지층의 토질 특성 등을 종합적으로 조사하여 지반조건이 고려된 합리적 설계와 시공이 되도록 한다.

카. 총사업비관리지침에 따라 사업추진 단계별로 진행되는 협의․조정 시 필요한 각종 기술적 증빙자료의 작성 및 보조업무

타. 기존 건축물 철거(기존 도면 제공), 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 지정폐기물(석면 등) 조사 및 성분검사 결과 반영한다.

파. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

1) 본 설계용역의 영역(실)별 용도 및 면적은 본 발주기관의 요구에 적합하도록 하되 향후 각종 설계 보고회 등으로 전문가의 의견 요청이 반영될 시, 협의 조정될 수 있음

2) 설계 발주단계에서 발주자가 작성한 기본안전보건대장 내용(해당 건설공사의 유해위험요인 및 감소대책)을 바탕으로 설계조건을 작성하여야 한다.

하. 본 과업을 수행함에 있어 과업지침서에 명기되지 아니하거나, 해석상으로 모호한 사항은 발주기관과 계약상대자의 협의 하에 수행한다.

- 다음 장에서 계속 -

Ⅱ	과업의 내용

1. 과업 기본방향

가. 올림픽공원 벨로드롬은 올림픽공원의 역사적 가치 및 `88년 서울하계올림픽의 문화유산으로서 기념적 가치를 담아낼 수 있는 상징성을 유지하되 미래적 감각과 창조적 예술성과 새로운 기능, 구조, 미학 요소를 최대한 반영하여 공공 체육시설과 복합문화시설로서의 이미지를 나타내도록 계획하여야 함

나. 올림픽공원 벨로드롬 기존 시설에 대한 현황과 이용 실태, 향후 도입기능을 면밀히 검토하여 예정 사업기간에 마칠 수 있는 합리적이고 효율적인 공사 범위를 설정하도록 함. 또한, 기존 경기장 기능의 회복 외 전문 공연장 등 복합문화시설로 조성될 수 있도록 공연법 등 관련법령에 의거하여 설계를 진행하여야 함

다. 올림픽공원의 도시관리계획 및 실시계획, 각종 영향평가, 문화재 관련 법규 및 지침 등을 준수하여 계획을 수립하여야 함

라. 에너지 효율·절약형 건축물이 될 수 있도록 설계 각 분야에 걸쳐 친환경적인 개념이 구체적으로 반영되어야 함

마. 시설 이용계층이 다양함으로 모든 시설은 노약자와 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편익시설 등 종합적인 계획을 수립하여 반영하여야 함

바. 국내 경기장 각종 공사(리모델링사업 위주)의 벤치마킹은 물론, 올림픽공원(발주기관) 관계자와의 협의를 거쳐 최상의 설계 및 시공이 되도록 하여야 함

사. 설계는 단계별로 설계업무 관련자와 건설분야 전문가의 의견을 최대한 수렴, 반영하여야 하며, 공사비 예산 범위 내에서 최대한 경제적인 설계와 공기 단축이 가능한 공법 등을 제시, 적용하여야 함

아. 벨로드롬 부지 인근에 위치한 경기장과의 연계, 남, 북측 광장과의 접근 동선 등 전반적인 것을 반영하여 설계하여야 함

자. 사업부지가 올림픽 공원 내에 위치하므로 공원 이용자를 고려한 공사관리계획을 수립할 것

1) 공사 중 분진, 진동 등 환경 오염원을 최소화하여 쾌적한 환경을 유지

2) 환경부 ‘날림먼지 관리 매뉴얼’ 참조하여 구체적인 저감 방안 마련

차. 공사비(개략 공사비 포함) 산정 시 공사발주시점에 따른 물가상승률을 고려할 것

카. 리모델링 공사 특성상 설계·공사 진행 중 돌발변수가 발생할 수 있으므로 공사범위를 명확히 설정할 것

2. 과업수행 일반지침

가. 일반사항

1) 계약상대자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며 올림픽공원 내 기존건물과의 조화를 통한 미적인 건물이 되도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력하여야 함

2) 계약상대자는 계약 체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며 착수하기 전에 착수신고서, 세부 시행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도 포함), 분야별 참여기술자 투입계획서 및 보안대책, 보안각서 등 기타 용역 수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 함

3) 계약상대자는 착수신고서를 제출할 때에는 본 과업설명서 내 “과업수행 중 단계별 제출서류”를 참조하여 서류를 첨부하여야 함

4) 설계 추진실적과 예정사항에 대해 본 과업설명서 내 “과업수행 중 단계별 제출서류”를 참조하여 이행하여야 함

5) 계약상대자는 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 협약, 인·허가를 완료할 수 있도록 제반의 조치를 취하여야 하며 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 보완 관련 자료를 작성 제출하여야 하며 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되도록 하여야 함

6) 계약상대자는 수행과정에 있어서 제반규정에 의한 관련기관 및 부서와 충분한 협의를 하여야 하며 협의에 따른 소요비용은 계약상대자 부담으로 함

7) 계약상대자는 다음사항에 대하여는 본 발주기관의 사전 승인을 받아 설계에 반영하여야 함

가) 과업수행계획서 및 착수신고서의 변경

나) 관계기관 및 부서의 협의사항

다) 감독관의 지시사항

라) 기타 계약상대자가 중요하다고 판단하는 사항

8) 본 과업설명서는 과업수행을 위한 기본사항을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 국가계약관련법령과 정부제정 각종 시방서에 준하되 수시로 감독관과 협의하여 수행하여야 함

9) 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 경우에 발주기관은 본 용역의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있고, 본 과업설명서에 명시되지 않은 사항 및 추가사항이라도 본 발주기관이 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 설계에 반영하여야 함

10) 본 과업수행을 위한 국내의 선진설계 및 전문기술을 활용키 위하여 선진시설 및 사례를 시찰하여 충분한 자료를 수집 후 설계의 질을 높이고 안전하고 경제적이며 최신기술 및 시설을 본 설계에 반영하여 국제적 시설이 되도록 함

11) 계약상대자는 제출도서 일체에 대하여 검수 후라도 설계상의 중대한 하자가 있다고 인정될 때에는 즉시 검토하여야 하며, 하자가 있을 시에는 재설계하여 인적 물적 피해가 발생치 않도록 하여야 하고 설계수량의 착오 및 설계과오로 인하여 공사 진행상 상당한 피해를 초래 하였을 경우 관계법령에 의거 이에 대한 책임을 짐. 계약상대자는 이를 보증하기 위하여 「건설기술진흥법」 및 동법 시행령의 규정에 따라 손해배상보증서(보험증서, 공제증서)를 제출하여야 함

12) 과업의 일부를 하도급할 경우 관계법령에 의한 전문 설계용역 업체에 하도급을 하여야 하고 사전 각 분야 감독관의 승인을 받아 하도급 신고를 필한 후 하도급 계약상대자의 참여기술진 현황을 제출하여야 함

13) 본 과업과 관련 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 공연, 내부환경개선, 기타 관련분야의 감독관과 긴밀히 협조하여 그 지시 및 승인에 의한 설계추진에 착오가 없도록 하여야 하며 과업의 완료 후라도 본 발주기관의 요구가 있을 때에는 적극 협조하여야 함

14) 계약상대자는 본 설계과업을 수행함에 있어 현장을 필히 답사하여 환경피해를 최소화 하고 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계를 하여야 함

15) 계약상대자는 보고회 및 각종 심의, 승인, 인가 등에 필요한 경우 기술자를 대동하고 기술적 사항에 대하여 본 발주기관을 대신하여 질의에 답변하여야 함

16) 계약상대자는 과업수행 중 보고회, 건설기술심의 등 각종 심의, 승인, 인가에 필요한 자료제출 요구 시 이에 응하여야 하며, 자료제출 등으로 인한 비용은 계약상대자가 부담함

17) 본 과업수행 과정에서 작성되는 각종 도서는 발주기관의 승인을 얻어야 하고 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등 결함에 대하여 계약상대자의 책임은 면제될 수 없으며 제3자에 의하여 작성된 각종 도서의 용역성과를 첨부하는 경우도 또한 같음

18) 본 과업수행을 위하여 계약상대자는 다음의 사항을 준수하여야 함

- 납품된 성과물의 저작권은 본 발주기관의 소유로 협의 함

- 모든 용역 성과품은 본 발주기관의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사, 외부로 유출 하여서는 안됨

- 과업의 폐기물은 소각 처리하여야 하며 보안이 필요한 작업용 사진 등은 본 발주기관에 제출하여야 함

- 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 책임은 계약상대자가 짐

19) 보고서 앞부분에 분야별 책임 기술자가 연대 서명 날인하여야 함

20) 설계내역서 및 단가산출서는 전산프로그램(EMS, SGS)을 사용 작성하여야 하며 공사 입찰을 위한 데이터 파일 요청이 있을 경우 협조하여야 함

21) 과업진척 보고는 착수 후 7일 이후부터 주간보고를 하되 서면보고하여야 하며 감독관이 필요하다고 지시하는 경우 제반 추진내용을 책임용역사가 직접 보고 하여야 함

-  과업 추진내용 및 공정현황

-  과업 수행상 문제점 및 대책

-  과업 수행실적 및 차기 수행계획

-  관련부서 협의사항

-  기타 필요한 사항

22) 시공될 주요자재에 대하여는 본 발주기관과 사전 협의하여 결정하여야 하며 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계가 되어야 함

23) 필요 시, 본 과업 수행 상 기술적 자문과 전문지식을 활용하기 위하여 자문회의(고회 포함)를 개최(발주기관 사전 승인 득 필요)하여야 함. * 단, 자문수당은 발주기관 별도 지급

24) 과업 착수 시 또는 과업수행 중 해당 설계용역 계약상대자가 설계과업 수행에 부적당 하다고 판단 될 때에는 감독관이 즉시 교체 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 함

25) 계약상대자는 본 과업설명서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사안에 대하여는 계약상대자가 책임을 지며 기타 경미한 사항 및 누락된 부분에 대하여는 협의 후 시행하여야 함

나. 공사 중 각종 대책

1) 공사 시에는 차량의 교통소통 및 안전에 지장이 없도록 하여야 하며 필요시 공사 중 교통 안전대책을 수립 후 설계에 반영하여야 함

2) 공사 시행 중 환경에 미치는 악영향에 대한 방지방안을 제시하여야 함

3) 납품된 설계도서에 의하여 공사 시공 중에 불분명한 사안이 발생하거나 설계변경이 필요할 시에는 본 발주기관 요구에 따라 협조하여야 함

다. 특별사항

1) 다음과 같이 부득이한 경우에는 용역기간을 연장할 수 있음

- 추가과업, 특별업무수행, 조사물량 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피하다고 발주기관이 인정할 때

- 발주기관의 사정으로 작업중지 또는 연기의 필요가 있을 때

- 기타 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 발주기관이 인정할 때

2) 과업의 변경 및 정산

- 발주기관이 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 계약상대자는 발주기관의 방침에 따라야 함

※ 기본설계 기술제안 확정 시 발주기관 방침에 따라 과업변경 및 정산할 수 있음

- 용역비는 면적 또는 공사비가 증가하여도 추가 지급하지 아니함. 단 용역비 산출시 부수적으로 산출된 추가업무비용 및 추정공사비가 감소될 시는 추후 계약금액 조정 또는 정산함

3) 기타

- 다음과 같은 경우 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며 이 경우 본 발주기관이 정하는 바에 따라 정산함

가) 과업수행이 불가능하다고 인정될 때

나) 본 발주기관의 지시에 불응할 때(시설담당자 및 관계전문가 의견을 포함함)

다) 과업수행 중 본 발주기관의 정책변경 등 불가피한 사유로 인하여 본 용역을 더 이상
추진할 수 없을 때(이 경우 설계용역비는 상호 협의하여 정산 처리함)

라) 기타 계약조건을 위배할 때

- 설계도서의 내용이 명확하지 않아 시공상세도가 추가 필요할 시에는 공사시행에 지장이 없도록 설계도서의 작성은 물론 필요시 기술지도를 하여야 하며, 이때 추가 업무보수는 지급하지 않음

3. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 계약상대자는 용역착수 시에 다음 서류 3 SET를 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부.

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 용역비에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 인력, 장비투입 예정현황 1부

10) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

11) 관련 서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)를 포함한 USB

12) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

나. 계약상대자는 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 발주기관이 지정한 장소에서 설명하여야 한다.

다. 계획설계 사전검토

- 계획설계 사전검토  체크리스트“5장 설계도서 납품목록” 참조

라. 계획설계도서 납품(계획설계 사전검토 체크리스트 검토결과 반영)

1) 계획설계 검사원 [붙임 5]

2) 계획설계 확정안 제출

3) 세부 제출도서는 “5장 설계도서 납품목록” 참조

4) 관련법규 검토서(건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시교통정비 촉진법 등 설계 및 인허가를 위한 기타 관련법 일체)

5) 현황측량 성과도

6) 현장조사 결과보고서

7) 유사시설 견학보고서(발주기관 사전 협의)

8) 추정공사비 내역서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

9) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 중간설계 사전검토

- 중간설계 사전검토 체크리스트“5장 설계도서 납품목록” 참조

바. 중간설계도서 납품(중간설계 사전검토 체크리스트 검토결과 반영)

1) 중간설계 검사원 [붙임 5]

2) 세부 제출도서는 “5장 설계도서 납품목록” 참조

3) 중간설계도서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

4) 공사시방서(초안)

5) 구조계산서, 부하계산서 등 계산서

6) 지질조사보고서

7) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

8) BF인증 관련 검토서 및 자료

9) 신·재생에너지의 공급의무 비율 이상 확보 검토서 및 자료

10) 인허가용 설계도서(기술제안입찰 FAST TRACK 방식 시행에 따른 도서)

11) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

12) 종결보고서

13) 건설기술심의요청서 및 심의관련 자료

14) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 검토자료(필요시)

15) 개략 공사비(예산초과 시 예산절감방안 검토서)

16) 대형공사 입찰방법 심의자료 및 입찰안내서

17) 에너지사용계획 협의 자료 및 완료 공문

18) 설계안전보건대장(건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시)

19) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

사. 설계VE 반영결과 제출

1) 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

2) 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

사. 실시설계도서 납품(3단계 체크리스트 검토결과 반영)

1) 실시설계 검사원 [붙임 5]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

7) 설계검사원

8) 손해배상보험증권(보증기간은 공사준공일까지 산정)

9) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

아. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제8조)

가) 주간공정보고 [붙임 5]

나) 월간공정보고 [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

4. 업무보고 및 회의 ※ 보고사항은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

가. 운영

1) 본 사업은 총사업비 관리대상이며, 계약상대자는 발주기관에 필요한 자료작성 및 대표건축사가 참석하여 관련 설명을 하여야 한다.

2) 계약상대자는 발주기관이 제시한 의견에 대해 계획 등에 적절히 반영하여야 하며 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

나. 업무보고

1) 주간공정보고

- 매주 목요일에 붙임 양식에 의거 제출한다.(요일 조정 가능)

2) 월간공정보고

- 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여  붙임 양식에 의거 제출한다.

3) 수시보고

- 설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시 마다 제출하여야 한다.

다. 업무회의

1) 일반사항

가) 계약상대자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의 할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 계약상대자 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정 하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 계약상대자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 계약상대자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회

- 계약상대자는 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

4) 중간설계(최종) 보고회

- 계약상대자는 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회

- 계약상대자는 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

7) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 계약상대자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

5. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) 공공기관은 중소기업청장이 지정․고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 규정(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조)

2) 친환경상품 구매촉진에 관한 법률(제6조)에 따라 우수한 친환경건설자재를 반영하도록 한다.(녹색기술경제과-942 10.10.20)

나. 설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재 LIST를 작성·제출하여야 하며, 발주기관의 승인 후 관급자재를 선정한다.

다. 중소기업 생산 제품 중 여성기업생산제품, 장애인기업 생산제품, 중증장애인 생산제품, 기술개발 제품, 녹색인증 제품에 대하여 우선 사용을 검토 하고 각 제품별 비교 검토서를 제출하여 발주기관의 승인을 받은 제품을 관급자재로 선정하여야 한다.

6. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) “녹색건축물 조성 지원법” 제14조, 제16조 및 제17조

2) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2017-154호)

3) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2017-881호)

4) 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준(국토교통부 고시 제2018-685호)

5) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조

※ 신재생에너지 공급의무 비율은 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 시행령 별표2 기준을 따른다

6) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. “건축물의 에너지절약 설계기준”에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지 관리공단과 에너지 절약 사전협의를 실시한다.

7. 장애물 없는 생활환경 인증

가.□장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙□(보건복지부 고시 제2019-672호)을 준수하여 설계하여야 한다.

8. 설계의 경제성 등 검토(설계VE)

가. 근거 규정

1) 건설기술 진흥법 시행령 제75조

2) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침

(국토교통부 고시)

나. 실시 시기 : 중간설계 단계에서 1회

다. 시행 방법

1) 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침 등 관련규정에 따라 설계VE 검토는 해당공사 건설사업관리자”가 실시한다.

2) 설계용역 계약상대자는 설계VE 제안내용을 설계에 반영해야 한다.

라. 설계VE 활동 기간 중에 본 계약상대자의 주요 업무 내용

1) 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 설계VE 업무를 수행하는 업체(건설사업관리자)로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

2) 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계VE 업무를 수행하는 업체(건설사업관리자)에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다. (설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

3) VE실행단계에서 설계VE제안서의 조치계획서를 작성․제출해야 한다.

4) 계약상대자가 만약 설계VE 제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출해야 한다. 또한 승인된 VE제안에 대해서는 즉각적인 수정 설계를 착수해야 한다.

5) 외부 자문위원의 합동토론회(계획/중간) 제안사항에 대하여 검토·반영해야 한다.

9. 보안성 검토

가. 계약상대자는 본 과업설명서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 계약상대자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립한다. (착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 계약상대자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

10. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 계약상대자는 설계공모 심사 시 심사위원의 지적사항이 설계에 반영 될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시에 보고한다.

다. 계획, 중간설계단계에 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부한다.

11. 기술제안 입찰안내서

가. 대형공사 등의 입찰방법 심의기준(국토교통부 고시)을 적용한다.

나. 일괄 대안 기술제안 등 기술형 입찰 설계심의 및 운영 표준안(국토교통부)에 따라 작성한다.

다. 최신 국토교통부 및 조달청 표준입찰안내서를 적용한다.

12. 지반조사 및 측량조사 ※ 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

가. 지반조사 범위

1) 시추조사

① 조사 수량 : NX 5공(계획설계에 따라 필요시 추후 조사 수량 변경)

② 조사 예정심도 : 공당 20m 기준(단, 탄성파 탐사시험 시추공의 심도는 30m 기준)

※ 본 지반조사 용역의 조사 내용을 근간으로 설계에 반영되므로,   시추조사 위치는 지층 단면을 유추할 수 있는 장소를 선정하여  작업 착수 전 감독관과 협의 후 조사하여야 함.

2) 표준관입시험 : 480회 (20m까지 1m 간격으로 실시)

3) 하향식 탄성파 탐사시험 : 1식 (30m 시추공 2공을 1m 간격으로 실시)

4) 현장조사시험 : 1식

5) 토질 및 암석의 실내시험 : 1식

6) 현황측량도 작성

7) 수준측량

8) 지장물조사

9) 보고서 작성

10) 기타사항

나. 조사 일반사항

1) 지반조사는 시설평면 가배치 계획 후, 도로계획서 및 주요 구조물   위치에 따라 실시하며 토층여건과 토층변화에 따라 감독관의 승인을 득하여 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

2) 모든 조사의 심도는 굴착면이하 풍화암 H=5.0m 또는 연암층 H=2.0m 까지의 보링을 원칙으로 하고 토층여건에 따라 감독관의 승인을 득하여 가감할 수 있으며, 풍화암층 및 연암층이 20m 이내에 없을 시에는   감독관과 협의하여 조사 시추공의 심도를 결정하도록 한다.

3) 조사위치는 평면도에 좌표로 표시를 하여, 측량에 사용한 원점(가BM)은 검측에 편리하도록 영구적으로 표시하여야 하며 이를 본 보고서에   수록한다.

4) 케이싱은 감독관의 지시가 있을 때 까지 빼어서는 아니되며 지하수위 측정은 24시간 경과 후 측정한다.

5) 토질이나 암석층을 불문하고 시료가 채취되지 않은 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 그 작업을 인정하지 아니한다. 또한, 토질 및 암의 분류는 시험결과에 따라 분류하며 육안판정에 따른 결과 및 현장관찰기록 등은 보조판별 자료로 한다.

6) 지반조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

① 조사명

② 조사기간

③ 조사지점 위치 및 표고

④ 조사자

⑤ 시추번호

⑥ 시추장비명

⑦ 각 채취 자료의 위치 및 심도

⑧ 시추 중에 나타난 층의 관찰

⑨ 시험의 심도 및 결과

⑩ 지하수위

⑪ 코어 회수율 및 천공속도

⑫ 기타 시추 작업 중 확인된 사항

⑬ 시추 중에 판단되는 토층, 암층분류 및 심볼 표시

다. 조사 계획

1) 계약상대자는 용역 착수 후 7일 이내에 지반조사계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 조사에 착수하여야 하며 조사계획서는 계약서, 과업내용서, 관계 법령 등을 참고하여 작성하되 다음 사항을 포함하여야 한다.

① 조사내용 (목적‧개요)

② 조사의 순서 및 방법(위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)

③ 조사공정표

④ 조사조직표

⑤ 조사 내용, 조사 방법, 조사 장비

⑥ 가설비 계획, 원상복귀 계획 등

⑦ 기타 교통처리 등 필요한 사항

2) 지반조사 위치에서 지하매설물(통신 케이블, 전력 케이블, 가스관, 상하수도관 등)이 예상되는 경우는 감독관에게 보고하고 관계기관과 협의하여 현지조사를 실시하여 위치, 규모, 구조 등을 확인한다.

라. 기존 자료조사

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과     타 기관에서 다른 목적으로 기 시행한 조사기록 등 기존 자료를 수집하여 대상지역의 지형 및 지질 특성을 파악하여 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과 분석에 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

마. 지표지질조사

축척 1:25,000 지형도와 기존 지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음과 같은 특성을 위주로 지표지질조사를 시행한다.

1) 암석의 종류 및 분포상태

2) 풍화의 심도

3) 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태

4) 계획지역 자연사면의 안정성

5) 구하천이나 매립지의 분포

6) 지반의 투수성, 자연 지하수위, 피압용출수 등 지하수 특성

7) 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성 및 분포상태

8) 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반 지형 및 지질적 주변 상태

바. 현장조사 실시

현장조사는 측량성과표, 기존자료조사, 지표지질조사 등의 실내조사의 내용이 실제 현장 지형이나 지반상태와 일치하는지 여부와 현장여건을 직접   조사하여 보다 정확하고 실제적인 지반조사가 될 수 있도록 하며 지반조사계획서 작성에 반영한다.

사. 시추조사 실시

1) 사전조치 사항

지하 매설지장물이 예상되는 지역은 가급적 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 도심지에서는 시추 전 일정심도까지 인력 터파기를 실시하여  반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 한다.

2) 시추조사

① 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는  유압식 시추기를 사용하고 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 하나 현장 원위치시험과 자연시료채취 등에 있어서 필요시는 감독관의 승인을 득한 후 시추공경, 시추방법 등을 변경 시행한다.

② 시추간격 및 심도는 지질상태의 변화와 주요 구조물 설치지역의   장기적 안정성 등을 고려하여 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

③ 시추 시 사용하는 용수는 굴진 시 순환수나 슬라임의 색조를 이용하여 지층변화 상태를 파악할 수 있도록 원칙적으로 청수를 사용하여야 한다. 단, 공벽붕괴 등으로 시추가 곤란한 경우는 감독관의 승인을 득한 후 시추 이수를 사용할 수 있다.

④ 암반층 시추시에는 반드시 다이아몬드비트를 사용하고 더블코어배럴을 사용하여 코어회수율을 최대한 높여야 하며, 굴진속도를 가능한 범위 내에서 암층별로 구분하여 기록 유지한다.

3) 시료상자 정리

① 시료상자의 규격은 NX 시추시료 보관이 가능한 규격(예 : 100×50×8cm) 이상으로 하고 상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코어를 채취심도별로 구분 보관하여야 하며, 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이 때 사진은 코어가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의  색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코어 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

② 암석코어가 아닌 슬라임 만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

4) 자연시료 채취

① 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연  시료를 채취하여야 하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

② 자연시료의 채취는 KS F 2317에 규정한 시험방법에 의거 연약하고 포화된 점성토를 중심적으로 채취하되 보링과 병행하여 연약 토질의 성질을 연속적으로 파악할 수 있도록 실시하며 채취심도는 감독관의 지시에 따른다.

③ 자연시료 채취용 얇은 관은 내경이 80mm 이상으로 내경비 1%,   면적비 15% 이내, 길이 80cm 이상의 것을 사용한다.

④ 시료 채취 시 채취심도와 채취기의 길이 측정을 정확히 하여 어떠한 경우라도 채취기 길이보다 많이 압입되어 내부의 시료가 압축되는 경우가 발생치 않도록 하여야 한다. 만약 이러한 경우 실내시험에 사용될 수 없으며 동일 심도 혹은 연속된 하부층에서 다시 시료를 채취한다.

5) 지하수위 측정

① 시추공 내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 측정한다.

② 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

6) 시추공 폐공처리

지반조사 완료 후 모든 시추공은 지하수 오염방지를 위해 반드시 관련 규정에 따라 폐공처리를 하고 감독관의 확인을 받는다.

7) 사진촬영

조사 전‧후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전과정을 천연색 사진으로 촬영하여 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 사진첩에 정리한다.

아. 시험굴 실시

1) 현장답사를 통하여 성토지역 또는 토취장 지역에서 지표토질조사를  실시한 후 토질의 변화에 따라 각 구간에서 대표될 만한 토질의 노출지점에 시험굴의 위치를 선정한다.

2) 시험굴의 심도는 토사층 1 ~ 2m를 기준으로 하되 각 토질의 대표되는 심도에서 시료를 채취하며, 시료의 양은 토성시험, 다짐시험, 실내 CBR시험 등을 실시할 수 있도록 50kgf 이상을 채취하여야 한다.

3) 토량환산계수 산출을 위하여 토층 1m 및 2m 깊이에서 자연상태의   현장밀도시험 각 1회, 굴착해 놓은 느슨한 상태에서 1회의 현장밀도 시험을 실시하여야 한다.

자. 현장시험

1) 표준관입시험

① 표준관입시험은 KS F 2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

② 시험횟수는 지층이 변할 때마다 또는 동일 층이라도 1.0m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며, N치가 50회에 도달하더라도 관입 깊이가 10cm 미만일 때는 타격을 중지하고 그 때의 관입깊이와 타격횟수를 기록한다.

③ 채취된 시료는 함수비 변화가 없도록 200gf 이상으로 2개의 시료 병에 넣어 밀폐시킨 후 시추번호, 심도 및 N치, 현장 토질 분류 등 제반정보가 기록된 규정된 명패를 부착하여야 한다.

2) 현장투수시험

① 토사층의 투수계수를 파악하기 위하여 정수두(Constant Head) 또는 변수두(Falling Head) 시험법으로 현장투수시험을 시행한다.

② 시험결과로부터 투수계수의 산정은 관련 규정에 근거하여 산출한다.

3) 수압시험

① 암반층에서의 투수계수 측정을 위한 수압시험은 Double Packer Method를 원칙으로 하며 시험단위 길이는 3.0m를 기준으로 하되 현장조건에 따라 조정한다.

② 수압시험 중 Packer 윗 부분에서 누수가 발생할 때에는 Packer의 위치를 상향 이동시킨 후 시험한다.

③ 주수량 측정은 주수율이 일정하게 된 후 시행하며, 각 단계별로 압력부하시간은 10분이상 되어야 하며, 각 측정시간은 1분 간격으로 한다.

④ 주입수의 주입압력은 시험지점에서의 상재토압을 상회하지 않는 것을 원칙으로 하며, 임의의 압력하에서 펌프의 용량이 부족한 경우 Packer 위치를 펌프용량에 일치하는 지점까지 이동시켜 시험 단위길이를 짧게하여 실시한다.

⑤ 수압시험 시 시추공 저부심도, Packer의 위치, 지하수위, 시추공   상부에서 압력계까지의 거리등 필요한 사항을 측정 기록한다.

⑥ 시험결과에서 루젼치(Lugeon Value : 압력 10kgf/cm2 하에서 길이 1m의 Nx 시추공에서 1분간 주입량은 Liter로 표시하며, 1 Lu = 10 -5cm/sec)를 산출하여 지반의 투수계수를 결정한다.

4) 공내재하시험

① 수치해석에 필요한 암반의 변형계수를 측정하기 위하여 시추공내에서 공내재하시험을 실시한다.

② 시험은 지반강성에 적합한 허용압력을 가지는 시험기로 수행하여야 한다.

③ 본 시험은 시추공내에 시험기를 삽입하여 유압이나 수압을 사용,  공벽에 압력을 가한 후 시험기 내부에 장착되어 있는 공경 측정장치를 사용하여 압력증가에 따른 공경의 변화정도, 즉 지반 변위량을   측정한다.

④ 압력조건은 다단계로하여 반복 시험하는 것을 원칙으로 하며 풍화대 및 연암층에서는 각 압력단계에서의 Creep변형을 파악하기 위하여 15, 30, 60, 120초 간격으로 측정한다.

⑤ 공벽에 가한 압력과 지반의 변위량에 의거 압력-변위량곡선을 작성하여 지반의 변형계수를 산출한다

5) 공내전단시험

① 불교란시료 채취가 어려운 풍화대(풍화토 및 풍화암)의 전단강도(점착력, 내부마찰각)을 측정하기 위하여 공내전단시험을 실시한다.

② 시추공내 시험구간에 전단기를 삽입하고 지상에서 핸드 펌프를   이용하여 전단기를 공벽에 부착시킨 후 수평압력을 가한다.

③ 시추공내 전단기와 연결된 Rod를 지상에서 유압잭으로 끌어당기는 전단응력을 가하여 파괴시의 전단력을 산정한다.

④ 시험구간을 변경한 후 동일한 방법으로 수평응력을 바꾸어 3회 이상 시험하고 측정된 각 3회 이상의 수평응력과 전단력을 근거로 선형회귀분석을 실시하고, 그 결과 산출된 직선적 관계로부터 점착력과 마찰각을 산정한다.

6) 하향식 탄성파탐사시험

① 감독관이 지정한 시추공에서 탐사를 실시한다.

② 공벽보호용 PVC와 공벽의 밀착 상태 확인 후 자료취득을 하여야 하며, 밀착이 충분히 이루어지지 않았을 경우 이에 대한 적절한 조치 후 자료취득을 실시한다.

③ 측점 간격은 1m를 기준으로 시추 종료 심도 1m 상부까지 자료를 취득한다.

④ 자료취득은 1개 지점에서 플레이트에 상타, 좌타, 우타 3회를 기본으로 한다.

7) 기타 현장시험

특정구간의 현장여건으로 인하여 설계 목적상 필요하다고 판단하는 경우 계약상대자는 추가시험의 합당성에 대한 전문가의 자문의견서를 첨부한 시험계획서를 제출하여 감독관의 사전승인을 득한 후 시행한다.

차. 실내시험

1) 토질시험

① 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 모든 흙의 자연시료에 대하여 다음과 같은 시험은 KS F 규정에 의거하여 실시한다.

가) 함수비 시험(KS F 2306)

나) 입도시험(KS F 2302)

다) 액성한계․소성한계 시험(KS F 2303)

라) 비중시험(KS F 2308)

② 연약점토층에서 채취된 자연시료에 대하여서는 다음의 역학시험을 추가한다.

가) 흙의 일축압축강도 시험(KS F 2314)

나) 3축 압축시험에서 점성토의 비압밀 비배수 강도시험(KS F 2346)

다) 압밀시험(KS F 2316)

2) 암석시험

① 채취된 암석코어시료에 대하여 다음과 같은 KS 규정에 의하여 실시한다.

가) 흡수율 및 비중시험(KS F 2518)

나) 탄성파속도시험

다) 탄성계수시험

마) 포아송비시험

바) 압축강도시험(KS F 2519)

사) 인장강도시험

아) 점하중강도시험

자) 절리전단강도시험

② 보링조사결과 채취된 암석코어(Core) 중 감독관이 지시하는 시료에 대하여 KS F 3031, 3033에 의한 일축압축강도 시험을 실시하며, 시료의 직경과 깊이에 대한 비율을 고려하여 측정된 강도를 보정한다. 필요한 경우 점하중강도 시험을 실시하여 굴착난이도 (Rippability) 결정 등 성과 분석 시 활용한다.

3) 기타

① 토질의 물성시험은 사업부지 전 구간에 대하여 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 대하여 실시하되 그 지점 및 시기는 감독관과 협의하여 시행한다.

② 토질 및 암석시험의 항목은 감독관과 협의하여 정하고 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야 하며 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함하여 제출한다. 단, 암석시험은 시험의 정도를 보장하기 위하여 시험기관은 발주기관과 협의하여 시험토록 하며 토질 및 암석시험의 횟수, 제 시험의 수수료 등이 과업내용서나 설계서와 상이할 때는 실제와 부합되게 실비 정산한다.

카. 현황측량 : 63,817㎡(계획설계에 따라 필요시 추후 측량 면적 변경)

1) 현황조사(측량) 및 답사

① 측량기준점은 경계점좌표등록부 및 지적도근점을 사용하여 측량을 실시한다.

② 수준점은 교내에 변경이 없는 목표물에 T.B.M을 설치 또는 매설하여 평면도에 표시하고 향후 측량에 편리하도록 한다. 이때에 B.M, TBM 야장을 부근 지형 작물을 표시하여 별도 조서(사진첨부)를 작성한다.

③ 지형 현황측량은 발주기관에서 제공한 건물배치도를 기준하여 현황 측량하며 제공된 배치도가 없을 경우 발주기관에서 해당건물의 사용현황을 조사한 후 측량한다.

④ 각종 맨홀의 위치, 지형 및 지장물 등 세부조건을 면밀히 조사한다.

⑤ 공동하수도와 연결위치, 연결방법, 구조 등의 하수시설현황을 작성한다.

13. 수요기관의 설계 검토요청 사항 반영

가. 계약상대자는 설계 보고회 등을 통하여 접수된 수요기관의 검토 요청사항에 대하여 반영 여부를 검토하여야 한다.

나. 설계단계별(계획, 중간)로 어떻게 검토하여 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시에 보고하며, 진행사항을 보고 한다.

다. 계획, 중간설계단계에 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부하여야 한다.

- 다음 장에서 계속 -

Ⅲ	과업수행 지침

1. 일반사항

본 지침은 올림픽공원 벨로드롬 부지내에 건립하는 「올림픽공원 벨로드롬 시설개선공사」의 설계범위 및 제반조건을 규정한 것으로 설계진행의 일관성을 유지하고 원활한 용역업무수행을 위한 지침을 정하는 데 목적이 있으며, 다음의 지침을 설계 진행시 준수하여야 한다.

가. 본 지침에서 설명된 사항은 계약상대자 임의로 해석될 수 없으며 계약조건에 명시된 내용에 따른다.

나. 계약상대자는 기본설계(안)를 확정하기 전 계획설계(안)를 마련하여 발주기관 및 사용자와 협의할 수 있도록 하여야 하며, 협의된 안을 기초로 기본설계를 추진하도록 한다.

다. 설계도서의 작성에 있어 친환경건축물을 고려하여 분야별 사용자재는 인증 기자재를 적용하고 인증 기자재가 없는 경우는 KS 규격품을 적용하여 설계도서를 작성하여야 한다. 다만, 공사비 등의 증감 사유로 인하여 발주기관과 협의한 경우는 그 협의된 결과에 따른다.

라. 토목, 건축, 전기, 기계설비, 통신, 기타 부대설비 등에 대한 설계기준은 관계법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

마. 본 지침에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한의 기준을 명시하여 어떠한 경우에도 자재 및 공법이 시공된 후에 동등이상 성능을 확보 할 수 있는 것이어야 한다. 특수자재, 공법의 적용으로 부득이 본 설계지침에 명시한대로 설계할 수 없는 경우 설계설명서(기본설계도서)에 그 적용부위, 자재, 공법의 명칭과 공인기관의 기술검토서 및 실험데이터 등 적용부위에 적합한 자재, 공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증자료를 명시하여야 하며, 시방서(실시설계도서)에 그 품질규격 및 시공방법 등이 명시되어야 한다.

바. 주요 자재 및 품질관리 지침

1) 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요자재공법에 대하여는 시방서(실시설계도서)에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

2) 모든 공사용 자재는 국산자재의 사용을 최대한 고려하고, KS 표시품을 우선 사용하며, KS 표시품중 1, 2급으로 구분되는 경우는 1급을 사용한다.

3) KS규격 표시품이 없을 경우 KT, NT등 품질보증을 받은 것으로 대신하거나 어느 것도 없는 경우에는 시중에 생산되고 있는 제품 중 최고의 품질을 확보하여 계획한다.

4) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득 하여야 하며, 자재품질은 관련 KS 규격 이상의 제품으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이하여야 한다.

5) 시험방법 및 기준은 건설기술진흥법 시행규칙 및 국토교통부 제정 공종별 표준  시방서에 따른다.

2. 사전조사 검토사항

계약상대자는 다음의 사항에 대한 사전조사를 실시하고 조사된 제반사항을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 그 조사결과를 문서로 제출한다.

가. 지반검토사항

- 지반의 성질

- 지내력

- 하수 수위 및 수량

- 동결심도

- 지하 매설물

- 지반의 성질에 따른 주위에 피해가 없는 암터파기(발파) 공법

나. 급․배수계통의 조사

- 시수원의 조사

- 배수 및 오수처리 계통조사

다. 냉․난방공급 관계 조사

라. 동력 공급원의 조사

- 전원인입 조사

- 수․변전설비 용량 재검토 및 조사

마. 사용자재 및 장비의 공급원 조사

- 골재 채취원

- 토취장 위치

- 건설장비 동원 상황

- 기타 사용자재의 공급원

바. 통신 공급원 조사

- 인입위치 조사

- 전화 및 LAN선로 조사

사. 방송 공급원 조사

- 위성방송설비 위치 조사

- 선로 구성관계 조사

아. 주변 하수 및 기반시설 전체와 주변토목 마감공사에 대한 조사

3. 설계범위

가. 지붕공사

1) 국제사이클연맹에서 규정하고 있는 국제공인시설 기준을 충족하는 자전거 경기장으로서 외부환경의 영향을 최소화하기 위한 실내화 방안이며, 대공간 장스팬 무주공간을 활용한 콘서트, 전시회 등 각종 체육·문화행사를 유치할 수 있는 안전성이 확보된 실내공간 조성을 전제로 함

2) 실내공간 조성을 위한 지붕구조물 설치는 철골트러스 구조를 전제로 하되 시공안정성, 형태적·역학적, 경제성을 감안하여 지붕구조시스템의 대안을 제시할 수 있음

3) 공연설비, 무대시스템 관련 장비 등을 양중할 수 있는 인프라 구축을 고려하도록 함

나. 경기장 내부 및 무대장비

1) 경기장 내부 인필드 영역은 다목적 활용 및 향후 설치·운용, 유지관리를 감안 진입동선 및 공간 배치를 고려하도록 함

2) 기존 트랙(333m)을 철거하고 국제공인규격에 부합한 실내형 250m 트랙 설치를 계획하도록 함

3) 노후된 관람석 의자를 전면 교체하며, 좌석 수가 감소하지 않는 범위에서 가족석(테마석), 장애인석의 추가 설치, 추가로 인필드 내 가변형 좌석 설치를 고려하도록 함

4) 소음의 외부 유출을 방지하고 내부 공연(행사) 진행 시, 잔향시간을 고려하여 내부 흡음공사를 고려하도록 함

다. 부대시설

- 경기장 기능 원복 및 시설용도 추가에 따른 편의공간, 대기실, 공연 관련 지원공간 등 각종 부대시설 설치를 고려하도록 함

라. 설비 조건

- 기존시설 현황 검토를 통해 경기장 내 냉·난방 및 급탕설비, 전기설비 등의 교체 및 개보수를 고려하도록 함

4. 분야별 세부 계획

가. 건축계획

1) 일반사항

가) 벨로드롬의 기능은 원복(피스타 330m ▸ 250m(국제공인 규격)로 교체)하고 전천후 다목적 복합문화시설의 기능을 수행하기 위해 지붕구조물을 설치하도록 함

- 피스타는 목재 또는 아스팔트 등의 장단점 비교 후 관계 연맹 자문을 통하여 확정

- 국제사이클연맹(UCI)에서 규정하고 있는 국제공인시설 규정 충족 중요(설계 중 UCI 예비인증 득, 공사완료 시 UCI 본 인증 득 조건)

- 실내공간 조성을 위한 지붕구조물 설치는 철골트러스 구조를 전제로 하되 시공안정성, 형태적·역학적, 경제성을 감안하여 지붕구조시스템의 대안(케이블 막 등)을 제시할 수 있음

나) 전문공연장 활용을 위해 공연관련 무대, 음향, 조명 등 기초 인프라를 구축할 수 있도록 하며, 상징성, 공공성, 경제성, 안전성 등을 고려하고 관련 법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 함 * 하울링 방지 등

다) 올림픽공원 내 주변 건물 및 자연과의 조화, 스카이라인, 시각적 개방감 등을 고려하여 계획하여야 함(올림픽공원 전체 마스터플랜 수립 등 아이디어 포함 시 가점 부여)

라) 기존 벨로드롬 시설을 조사·분석하고 공사로 인한 기존 시설의 구조 안전에 지장이 없도록 구체적인 검토 및 대안을 제시하고 피스타 및 인필드의 다목적 활용을 위해 사용성, 시공성을 고려한 최적 설계가 되도록 계획하여야 함

마) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선정하여야 함

바) 지속가능한 건축물이 될 수 있도록 친환경 건축 및 에너지 소비 최소화 계획을 하도록 함

사) 불특정 다수가 이용하는 건물임을 고려하여 계획 시 유니버셜 디자인 및 장애물 없는 생활환경 인증 등의 기준에 맞게 적용하도록 함

아) 설계 시, LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감방안 마련을 권장하여야 함

자) 우리 발주기관에서 제시한 영역(실)별 기준 면적이 부족하거나 과다하다고 판단되는 경우, 제 영역(실)의 기능 발휘에 지장이 없는 범위 내에서 증·감이 가능함. 단, 총 연면적은 제시한 연면적 대비 ±3% 이내에서 조정하도록 함

- 총공사비 범위를 초과하더라도 우수 아이디어는 차후 별도로 제안 받아 공사 추진 예정

차) 인테리어 설계가 필요한 내용은 다음과 같음

- 주출입구 / 로비, 테마존 내 가족관람석 등 각 실은 인테리어적 요소를 연출하고 필요하다고 판단되는 부분을 추가 제시하도록 함

- 다수의 이용자가 사용하는 공간의 경우, 향후 인테리어 트렌드를 고려하도록 하고 이용자 편의를 우선으로 확보하도록 함

- 공연시설 도입에 따른 주차장 위치, 방식, 차량동선에 대한 고려 및 아이디어 제시

2) 배치계획

가) 올림픽공원 내 각종 기존시설을 고려한 배치계획을 수립하여야 함

나) 지형 조건을 고려하여 보행자/차량/공연 설비 등 진·출입 구역 등 대지이용계획을 결정하여야 함

다) 주변시설물과 일조 등의 고려와 건물 간 및 인접 시설과의 거리 확보, 환경 및 지형과 향에 대하여 충분히 고려하고 건물의 축과 방향은 에너지 관리 측면에서 유리하도록 결정하도록 함

라) 외부의 적정휴게공간과 부대편의시설 설치에 관한 사항을 고려하도록 함

마) 건물의 출입구는 장애자용 편의 통행을 고려하도록 함

바) 수목, 암석 등의 기존 조경재의 활용이 가능한 배치를 고려하도록 함

사) 주변 인접시설과의 연계성이 고려된 배치를 고려하도록 함

- 방화 및 피난을 위한 설계

- 적정 규모의 체육 공간 및 휴식 공간 확보

- 추가 소요시설 면적의 확보 및 적정 배치

- 인접시설과 연계하여 포장시설 배치

아) 사업부지 남측과 북측의 레벨차이를 극복하는 다양하고 창의적인 입체 동선계획을 제안하도록 유도할 것

3) 평·입·단면계획

가) 내부 동선은 관람객과 서비스 / 선수 동선 등을 기능적으로 분리하여 계획함

나) 다중이 이용하는 시설이므로 피난·방화 등 관련법에 의한 저촉이 없도록 재해재난 시, 안전하고 원활한 피난동선을 계획함

다) 상호 관련성을 갖는 기능 단위들을 인접하게 배치하여 기능이 효율적으로 구성될 수 있도록 하고 불필요한 동선이 유발되지 않도록 계획함

라) 벨로드롬 내부 인필드의 새로운 도입 기능을 감안하여 계획함. 공연 등 다목적 활용을 위해 무대 등 설치에 대한 최적의 레이아웃을 고려하여 평면을 구성하도록 함

마) 현재 333m 트랙에서 국제 공인규격 250m으로 축소되는 것을 감안하여 효율적 공간 활용을 계획하며 경기지원시설은 제시된 범위 안에서 자유롭게 배치하도록 함

바) 각 층의 접근성을 강화시켜 영역(실)별 기능 활성화를 도모함, 이동 동선의 편의를 위해 가급적 건물 내부에 단차가 생기지 않도록 계획함

사) 벨로드롬 좌석 배치는 기존 배치를 전제로 하되 좌석 수가 감소하지 않는 범위에서 가족석(테마석), 장애인석의 추가 설치를 고려하여 계획함

아) 내부 벽체 중에서 방화벽, 구조상 내력벽, 방수 등이 필요한 벽체들을 제외한 벽체는 시멘트 벽돌벽이나, 건식 벽체 등으로 계획

자) 코어공간을 제외한 공간계획은 공간구성의 실의 기능성을 고려하여 Module을 적용한 계획이어야 함. 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하고 상호 연계적인 동선을 계획함

차) 장애인의 각종시설 이용에 필요한 편의시설을 설치함(ex : 장애인용 세면기-보호받침대와 설치높이를 낮게 조정, 전자감응식 수도꼭지, 장애인 양변기, 장애인 소변기, 자동문, 기타)

카) 엘리베이터는 장애인 편의시설 확보 등을 위해 관계법규를 준수하여 적정 대수 이상을 설치하도록 계획함

타) 형태 위주의 과도한 상징성을 표현하기보다 친근한 아이덴티티를 가진 미래지향적 이미지의 건축물이 되도록 계획함

파) 형태, 재료 색채 등 디자인 요소들은 올림픽공원 내 통일성 있고 조화가 되도록 계획함. 외부 마감재는 에너지효율 및 운영관리 비용 절감을 위한 재료를 사용함

하) 지붕을 비롯하여 건물의 어느 부분도 누수가 되지 않아야 하며 방수, 결로를 고려하도록 함

4) 영역(실)별 면적 구성 및 영역별 지침

해당 내용은 기본계획 및 타당성조사에서 수립한 안임

가) 경기 및 관람시설

(1) 경기시설은 국제사이클연맹(UCI) 올림픽 벨로드롬 3.6.068 트랙 기준과 3.6.066 재료 기준에 부합하는 길이 250m 목재형 피스타 트랙을 적용할 것

(2) 인필드의 활용도를 높이기 위하여 다양한 활용방안을 제안하고 이에 따라 유동적으로 사용할 수 있는 가변식 좌석을 제안할 수 있음

(3) 관람시설은 총 6,000석 이상의 고정식 관람석을 계획하고 테마석을 별도로 계획하여 다양한 관람문화를 충족시킬 수 있는 공간으로 조성함. 「장애인・노인・임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」에 장애인 등의 이용이 가능한 관람석 또는 열람석은 전체 좌석 수의 1% 이상을 계획할 것

나) 경기지원시설

(1) 경기지원시설은 경기운영에 있어 요구되는 필요시설로 자전거 정비, 세척, 보관실, 로라실 등으로 구성하며 선수대기실은 사이클 경기 개최 사용인원을 고려하여 계획하고 샤워 및 탈의실, 라커룸을 설치할 것

(2) 경기운영관련실(운영사무실 등)과 방송장비 및 전산실, 음향실을 설치할 것

(3) 냉난방, 기류, 조명 등 사이클 경기장으로서의 기능이 확보되도록 할 것

다) 활성화(수익)시설

(1) 활성화(수익)시설은 공연지원시설과 임대형 상업・업무시설로 구성함

(2) 공연지원시설은 경기장을 이용하지 않는 비시즌 기간에 공연장으로 활용할 수 있도록 계획하고 공연 관련 장비실 및 대기공간(분장실) 등 공연을 진행하는데 필요한 적정 면적을 제시하여 구성할 것

(3) 임대형 상업시설(shop)은 벨로드롬 활성화를 위한 시설로서 임대료 수익을 창출할 수 있도록 소매점, 카페 등의 집객시설 등을 층별로 다양하게 제안하도록 함

(4) 임대형 업무시설은 추후 자전거 유관기관의 사무실로 이용할 수 있도록 계획할 것

- 다음 장에서 계속 -

<참조> 영역별 면적표(안)

분류		제안규모(㎡)	면적비율(%)	비고
경기 및 관람시설	관람시설	5,451.44	20.80 %	일반관람석, VIP석, 가족관람석, 발매부스
	경기시설	6,244.21	23.83 %	인필드, 트랙
	소계	11,695.65	44.63 %	-
경기지원시설	선수지원시설 및 경기운영시설	3,541.79	13.51 %	자전거 정비실, 운영사무실, 의무실 등
	소계	3,541.79	13.51 %	-
활성화(수익) 시설	공연지원시설	268.95	1.03 %	공연관련장비실, 분장실 등
	임대형 상업 및 업무시설	1,022.61	3.90 %	임대형 상업시설(Shop), 임대형 사무시설(사무실)
	소계	1,291.56	4.93 %	-
전용면적(㎡)		16,529.00	63.07 %	-
공용면적(㎡)		9,679.68	36.93 %	기계/전기실, 홀, 로비, 복도, 화장실, 연결통로 등
제안면적(㎡)		26,208.68	100 %	-

<참조> 층별 면적표(안)

구분		계획면적(㎡)	비고
지하 1층	선수지원영역	1.858.59	자전거 보관실 / 선수대기실 / 심사실 / 샤워·탈의실 등
	전용면적 계	1,858.59	-
	공용면적 계	3,269.33	-
	계	5,127.92	-
지상 1층	경기운영 사무시설	1,149.05	운영사무실 / 회의실 / 실황방송실 / 전산실 / 촬영실 등
	공연지원시설	268.95	공연관계자실 / 대기실
	임대형 상업시설	491.63	-
	임대형 업무시설	424.16	-
	경기시설	6,244.21	인필드 / 트랙
	전용면적 계	8,862.24	-
	공용면적 계	2,745.91	-
	계	11,608.15	-
지상 2층	관람시설	2,239.07	관람석 / 발매부스
	임대형 상업시설	106.82	-
	전용면적 계	2,345.89	-
	공용면적 계	3,151.71	-
	계	5,497.60	-
지상 3층	관람시설	3,212.37	관람석
	경기지원시설	249.91	기자실 / 방송실 / 음향실 등
	전용면적 계	3,462.28	-
	공용면적 계	512.73	-
	계	3,975.01	-
전용면적 계		16,529.00	63.1%
공용면적 계		9,679.68	36.9% / 기계/전기실, 공조실 등은 공용면적에 포함
면적 합계		26,208.68	-

나. 기술 분야별 지침

1) 구조계획

가) 기존 벨로드롬 시설 현황과 관련하여 기실시한 안전점검 및 정밀안전진단 보고서, 보수보강 이력 등을 명확히 분석하여 이를 구조계획에 반영하여야 하며, 공사로 인한 기존 건축물의 구조 안전에 지장이 없도록 구체적인 검토 및 대안을 제시함

나) 구조설계 기준의 적용에 있어 최신의 정부 제정 기준을 우선하여 적용하여야 하며, 구조설계 기준은 건축법 및 건축법시행령, 건축구조기준(국토교통부), 구조설계기준(KDS 14 00 00), 콘크리트구조 해석과 설계 원칙(KDS 14 20 10), 강구조 부재 설계기준(KDS 14 31 10) 등을 적용하고, 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대해서는 외국 기준을 준용할 수 있음

다) 안전성, 기능성을 고려한 경제적인 구조이어야 하며, 추정공사비를 고려해 건축물의 형태 및 상부구조물 구조 시스템을 적용해 공사비 절감방안을 계획함

라) 무대설비의 설치 하중을 고려한 구조설계의 안정성을 확보하고 구조의 안전과 유지관리의 편의를 위한 관리시스템 계획함

마) 건물의 골조는 기존 건물의 기능에 부합함과 동시에 지진력 등 외력에 효율적인 구조계획으로 안전성, 경제성 및 건물의 구조적 합리성을 추구하여 건물 골조의 구조미를 최대한 추구하도록 계획함

바) 구조설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조 계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련법규의 적정치 이상으로 처짐, 진동, 소음 현상 등이 발생하여서는 안 됨

사) 모든 공정은 일반적인 방법으로도 시공할 수 있는 구조로 하며, 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시.

아) 장스팬구조는 합리적인 구조시스템을 적용하고, 비정형 구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시함

자) 기존 건축물(조명탑 포함) 철거 계획을 수립하여 철거되지 않는 기존 구조체의 보수 보강 계획과 새로운 구조체가 생성되는 부분을 포함한 구조안정화 대책을 수립함

차) 공기단축 및 공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획함

카) 지붕 마감재 및 건물의 외벽마감재 등은 태풍, 폭우, 폭설 시 하중 지지력이 취약한 중심부에 설계기준 범위 내의 하중이 가해져도 안전한 구조로 해야 함

타) 지반조사(탄성파시험법)를 실시하여 얻어진 지반정수를 활용하여 내진설계를 실시해야 하며, 관련 법에서 정한 규정을 반드시 준수해야 함

파) 외력 또는 온도 변화로 인한 구조체의 변형을 최소화하기 위하여 익스팬션 조인트를 설치하거나 이에 갈음할 수 있는 구조형식 및 근거를 제시함

하) 고정하중, 활하중, 적재하중, 지진하중, 풍하중, 적설하중 등을 고려하여 구조재 및 마감재 등의 실재중량을 계산하여 적용하며 각 영역(실)의 기능을 고려하여 충분한 하중을 견딜 수 있는 구조로 계획함

2) 토목계획

가) 기존 지형여건, 지반조건, 공동구, 지하 지장물을 고려한 경제적인 토공사를 계획함

나) 포장 재료는 내구성이 강하며 친환경적인 재료를 계획함

다) 옥외 주차장은 이용자의 편의와 서비스 차량을 고려하여 배치함

라) 계획부지 전체에 대한 원활한 배수 계획함

3) 조경계획

가) 기존 녹지 현황조사 및 보존 계획을 수립함

나) 올림픽공원 자연환경 연계한 친환경적 녹지공간을 조성, 계획함

4) 기계설비 계획

가) 냉난방 설비 : 공연장의 특성을 고려하여 소음, 진동 등의 영향을 최소화함으로써 정숙하고 쾌적한 실내 환경이 유지될 수 있는 시스템을 선정함

나) 환기시스템 : 환기설비는 양호한 공기질을 유지할 수 있도록 충분한 용량을 권장하며, 실별 용도를 고려하여 환기목적에 적합한 환기방식을 채택하고, 특히 공연 시 무대 연출을 위한 연기, 안개 등을 효과적으로 제거할 수 환기시스템을 고려하고, 지붕 상부 고임열을 배기할 수 있도록 계획함

다) 급수 및 급탕 설비 : 급수 급탕배관은 적정 수량 및 수압으로 공급을 계획하고, 위생기구별 최소 소요 압력 이상으로 계획함

라) 위생기구설비 : 위생기구는 관계법규에 따라 절수형 기기를 사용함을 원칙으로 하며, 동파의 위험이 없도록 동파방지 계획을 수립합

마) 오·배수설비 : 옥내에 설치되는 배수배관과 오수배관은 분리하여 계획하고, 원활한 배수가 이루어질 수 있도록 배관 구배를 유지하며, 옥외에 연결되는 토목배관 위치 및 레벨을 고려하여 계획함

바) 소방설비 : 소방기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등 최근의 관련법규를 준수하고, 화재발생시 초기 대응력을 높이고 화재로부터 인명 및 시설물을 최우선으로 보호할 수 있도록 계획함

사) 자동제어설비 : 자동제어 시스템 간 통신방식은 표준형 또는 개방형 프로토콜을 사용하고, 기존 시스템과 상호 호환성을 확보하도록 함

아) 소음진동대책 : 공연 진행 시, 정숙한 음환경 조성을 위해 무대부에 설치되는 송풍기는 소음 및 진동이 적은 장비를 최우선으로 선정하고, 방음·방진 설비를 적용함

자) 배관 및 닥트의 보수관리가 용이하도록 충분한 공간과 점검구 확보하도록 함

차) 기계장비는 에너지고효율인증제품을 기본으로 하고, 불가피할 경우 에너지효율이 우수한 제품을 우선적으로 적용함

카) 기존 설비를 이용하여 사용하는 곳이 많이 있으므로 사전조사를 충실히 하여 전압이나 사용전력이 문제되지 않도록 계획함

타) 추가로 설치되는 공조설비는 용도별, 실별 제어가 가능토록 하고, 자동제어를 통해 중앙에서 관리가 될 수 있도록 계획함

5) 전기설비 계획

가) 전력인입 및 증설에 관한 계획

나) 수변전설비 및 예비전원에 관한 계획

다) 자동조명제어 시스템을 설치하여 경기장 조명기구를 ON/OFF 제어

라) 모든 전기기기의 제작 및 설치는 관련규정에 명시된 기준을 적용함

마) 시설물의 안정적인 전력공급을 위해 충분한 용량의 전원설비를 구성하여 주·야간 운영에 지장 없는 최상의 전기설비를 갖추도록 함

바) 전기사고의 사전예방 및 사고 시 파급 구간 최소화로 경기 및 공연 등 기타 활용에 지장이 없는 Back-up 전원 시스템을 구축함

사) 인명의 안전과 보호에 우선을 두며, 유지보수가 용이하여야 하고 에너지 절약 및 친환경적으로 설치되어야 함.

아) 경기장 조명설비와 전등 설비는 자전거 경기를 위한 스포츠시설 기준(국제기준 고려) 및 공연장에서 정한 조도기준을 충족하여야 함.

자) 경기장 운영에 필요한 전기용량과 조명, 음향, 영상 등 공연시 필요한 전기용량 추가확보 및 안전한 공급을 위한 전력 케이블 분리하여 포설함

차) 공연시 조명, 음향, 영상 등에 필요한 전력을 인입할 수 있는 수배전반 설치를 고려하고 수배전반 1차측에 발전 차량에서 발전전원을 연결할 수 있도록 케이블 연결 단자 설치

카) 전력설비 제어시스템과 경기장내 모든 조명설비 제어시스템을 채택하여 효율적이고 경제적으로 운영

타) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조 ⑤항에 따라 수전용량 1000KW 이상 시 계약전력 5% 이상 규모의 에너지 저장장치(ESS)를 설치. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제6조 제4항. 연면적 10,000㎡ 이상은 BEMS를 설치를 고려하여야 함

파) 건축물의 에너지절약 설계기준 제10조 6항 및 [별지 1호 서식. 에너지절약 계획 설계 검토서] 2. 에너지 성능 지표 (EPI : Energy Performance Index) [별표 1호 서식] 다.전기부문, 10항“분산제어시스템(FMS : Facility Management System. 시설관리시스템) 으로서 각 설비별 에너지 제어 시스템에 개방형 통신기술을 채택하여 설비별 제어시스템 간 에너지관리 데이터의 호환과 집중 제어가 가능한 시스템”채택하여야 함

6) 정보통신 설비계획

가) 신기술, 신공법 적용 계획

나) 주요 기자재 및 장비 적용 계획

다) 모든 정보통신설비의 제작·설치는 관련규정에 명시된 기준을 적용함

라) 스포츠시설 기준 및 공연장 등 관련 기준에 적합하게 계획함

마) 계약상대자는 공연장의 정보통신분야 운영현황 전반을 파악·적용하고 관련규정에서 정하는 내용이 충분히 반영되도록 설계하여야 함

바) 비상방송은 경기장 음향설비와 연동되어 화재시 비상방송을 송출해야 함

사) 인터넷 망 라인은 일반 인터넷, 대한체육회, 벨로드롬 협회, 일반방송 송출망, 올림픽경기 방송 송출망 등을 관련 규정에 맞게 구축

아) 인터넷 망에는 해킹방지 시스템을 구축

자) 경기장 및 사무실에 무선 AP설비와 AP 콘트롤 시스템을 구축

차) 경기장 입구 및 내부에 경기장 안내설비를 구축

카) 경기장 및 공용부와 사무실에 전자시계설비를 구축

7) 소방 설비계획

가) 소방시설은 소방법령, 화재안전기준(NFC), 기타 관련규정에 명시된 기준을 적용함

나) 신기술을 적용하여 최신 시스템 구성

다) 주소형 감지기 또는 적응성 감지기를 설치해 신속한 초기화재 진압에 적합한 설계

라) 소방시설공사와 관계되는 건축, 토목, 기계, 전기, 정보통신설비 등의 설계를 검토하고 재산과 인명의 보호에 적합한 계획이 되도록 설계

마) 방화 구획은 평면·단면계획, 내장계획, 구조계획에서 검토하고, 화재의 연소확대 방지에 적합한 시설이 되도록 함

바) 소방시설은 화재의 조기경보·초기소화·본격소화·피난 및 구조구급과 유지관리를 고려하여 계획함

사) 차후 건축물의 확장 및 변경이 있을 때에 대응하기 쉽고 점검 및 보수에 편리하도록 계획하고 유지관리에 편리한 시설이 되도록 설계함

8) 공연장비 및 객석계획

가) 공연무대장치, 음향, 조명장치 등은 다양한 공연 및 행사를 할 수 있는 적정 시스템을 구축하되 각종 규모에 맞는 행사를 고려하여 계획함. 단 본 설계용역은 외부 공연대행사(기획사)에서 구비된 음향, 무대 기계 등의 자가 장비를 별도 설치할 수 있는 최소 인프라 구축을 전제로 함

- 무대기계, 무대조명, 건축․전기음향 전문가 컨설팅.

- 공연장 계획에 따른 각종 Batten, 건축음향계획, 지붕 및 실내 마감재 검토

나) 건축 환경 및 실내 Layout에 맞는 시스템의 적절한 구성이 되어야 하며, 관객과 무대의 일체감 조성, 운영자의 편리성을 보장

다) 공연장 운영이 자유롭고 다양화될 수 있도록 호환성, 확장성, 융통성 확보.

라) 무대장비의 모든 시스템은 안전하면서도 다양한 연출효과를 얻을 수 있도록 계획하되 인프라 구축을 기본으로 하고 편리하고 미래지향적인 시스템을 도입하여 올림픽공원 내 공연문화 활성화에 많은 기여를 할 수 있도록 설계

마) 무대시설 및 건축음향은 최적 설계를 위해 공연장 전문 컨설턴트와 협력하여 계획하여야 하며, 공연장 무대시설분야 안전지침 및 기술기준에 적합할 것

바) 공연은 규모, 기획 연출가마다 각각 요구사항이 변하므로 다양한 연출을 위한 무대 시스템을 계획하여야 하며 운영이 자유롭고 다양화될 수 있도록 호환성, 확장성, 융통성을 확보할 것

사) 무대시설이 공연의 장애 요소가 되지 않도록 설계하며, 무대시스템 계획 시 각 분야의 기능(전기, 공조, 조명, 음향, 건축음향 등)이 서로 연계, 보완되어 성능 발휘에 문제가 발생하지 않도록 설계.

아) 특수설비인 무대기계, 무대조명, 무대음향, 무대영상 관련 필요한 전원은 공연 부하의 특성을 고려하여 적정한 용량을 계획하여야 하며, 전력간선은 무대기계, 무대조명, 무대음향, 무대영상이 구분되어 전기 사용이 가능하도록 설계하여야 하고, 특히 고조파로 인해 타 설비에 영향이 없도록 설계

자) 아레나 타입의 공연이나 프로시니엄 타입의 공연 연출이 가능하도록 상부 트러스, 그리드, 리깅시스템을 고려하여 설계.

차) 공연장비 설치 및 철거 시간을 절약할 수 있는 다양한 시설에 대한 방안 제안할 것

카) 무대시설의 설치 하중을 고려한 구조설계의 안정성 확보하고 안전과 유지관리의 편의를 위한 관리시스템 계획

타) 분장실 및 임대사무실에 공연상황 모니터링 및 커뮤니케이션이 되도록 계획하고, 관객을 위한 공용공간에서의 공연안내, 광고, 방송 등이 가능하도록 계획

파) 컨텐츠 제작, 생방송 송출 등 중계차와 연동되어 진행되는 공연을 고려하여 이에 대응할 수 있는 인프라를 계획

하) 설비 작동시, 과도한 진동이 있어서는 안되며 각종 부품은 진동방지 장치를 전제로 설치되어야 하며, 연결부분에는 진동방지 쿠션이나 나일론 너트 혹은 그 유사 상품을 사용해야 함. 진동이 생기는 설비와 베이스 사이에는 방진조치를 취하고 설비구조 설계 시, 구조물의 고정적인 진동률을 감안, 공연 중 진동, 소음이 발생하지 않도록 함. 사전 측정원칙은 관련 표준 규정 방법에 따라 진행

- 다음 장에서 계속 -

Ⅳ	설계도서 작성요령

1. 공통사항

가.‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016-1025호)’을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계약상대자는 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 발주기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 설계공모의 내용과 자료수집 및 조사 내용을 기본으로 하여 계획설계를 수행하여야 하며, 발주기관과 협의하여, 구체화 한다

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 계약상대자는 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

4) 계획설계 완료 후 총사업비 관리지침 제57조제3항에 따라, 조달청에 설계적정성 검토를 받아야 한다.

다. 계획설계(안) 작성 시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수․폐수 처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 조사하여야 한다.

- 시설개선공사 건물의 현황을 면밀히 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

3. 중간설계

가. 정의

- “중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 과업설명서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 시설개선 대상인 기존 올림픽회관 및 올림픽 파크텔 관련하여, 철저한 현황조사와 실측을 통해 건축, 설비 및 각 분야의 도면을 작성 후, 시설개선 관련 설계를 진행해야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조, 의료가스실, 화학폐수장, 공조실 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

7) 관련법령, 시, 구조례 및 각종 지침에 따른 도시계획시설변경 및 실시계획(변경)인가 도서 작성 시 협조 등 인허가를 진행하며, 향후 증축예정인 체육박물관을 포함하여 시행한다.

8) 문화재 현상변경 심의, 교통영향분석 개선 대책수립(교통영향평가) 협조,  서울시 경관심의, 송파구 심의(자문), 서울시 좋은빛위원회 심의, 중앙건설기술심의, 수도권정비계획 심의 등 관련 심의 및 평가를 진행해야 하며, 일정에 차질 없이 완료해야 한다.

8) 중간설계 완료 후 총사업비 관리지침 제57조제3항에 따라, 조달청에 설계적정성 검토를 받아야 한다.

9) 설계VE 진행 시 검토기관과 협조하여, VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하며, 조치사항을 설계에 반영한다.

10) 예비타당성조사보고서를 토대로 경제성 및 재무성분석을 시행한다.

11) 실시설계 이전 기획재정부와 총사업비 협의를 진행하며, 관련도서 작성 및 검토자료를 작성한다.

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 조사/분석사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 건축계획사항 : 내 외부 공간구성계획, 동선계획, 시설배치 계획, 평면, 입면, 단면 계획

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출 표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

다) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

라) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․  검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치, 화학폐수장, 공조실 등

- 계통도 : 공조, 위생, 의료가스, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 옥탑층 등 장비류 설치에 따른 구조계획 건축협의사항, 기계장비

동력 확보 관련 등 전기협의사항

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면(TAB, 진공청소설비, 주방설비,

도시가스, 방음․방진설비, 자동제어 등)

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 도면목록

- 범례 및 특기사항

- 상세도(조명기구 등)

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비 : 수변전설비 단선결선도 및 평면도

- 계통토 : 간선, 동력 등 계통도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

7) 소방

가) 설계 설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 수원의양, 소화펌프용량 계산서

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 옥외배치도 : 각 건축물, 시설물의 배치 및 위치 평면도에 따른 소방설비 옥외배치도

- 설비의 계통도 : 소화(가스소화포함), 자동화재탐지설비, 유도등, 비상콘센트, 비상콘센트

- 설비의 배치도 : 소화, 경보, 피난, 소화활동설비

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 과업설명서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 철거발생시 철거관련 도면 및 서류를 작성하고 제반 업무를 수행한다.

6) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

7) 건축허가(협의)를 관련법령을 준수하여, 진행하여, 일정에 차질 없이 완료한다.

8) 녹색건축물 조성지원법, 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 등 의무 취득해야하는 인증 등을 고려하여 설계를 진행한다.

9) 실시설계 완료 후 총사업비 관리지침 제57조제3항에 따라, 조달청에 설계적정성 검토를 받아야 한다.

10) 설계VE 진행 시 검토기관과 협조하여, VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하며, 조치사항을 설계에 반영한다.

11) 예비타당성조사보고서를 토대로 경제성 및 재무성분석을 시행한다.

12) 공사비가 확정되면 기획재정부와 총사업비 협의를 진행해야 하며, 관련도서 작성 및 검토자료를 작성한다.

13) 공사입찰과 관련하여, 대형공사입찰방법 심의를 준비, 진행하며, 확정된 입찰방법에 따라, 입찰 안내서 또는 과업지서서를 작성하고 관련 사항들을 협조한다.

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 철거도면

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서

라) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 의료가스, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 공조실 평면도,

정화조평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 상세도(조명기구 등)

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

5. 지반조사 및 측량조사

가. 보고서 작성

1) 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하고, 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 한다.

가) 지층구조 단면도

나) 토공설계 자료

다) 구조물, 건축물 심도 결과 및 기초설계 자료

라) 기타 필요한 공법

2) 작성에 있어 초안을 작성하여 인쇄 전에 감독관에게 제출하여 내용 검토를 받은 후에 인쇄하여야 한다.

가) 보고서의 규격 : A4

나) 표지 지질 : 레자크지

다) 본문 지질 : 백상지(양면 인쇄)

3) 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조사명

- 조사 시행자명

- 제출문 : 계약상대자의 대표 및 책임기술자의 서명날인

- 조사요약 보고문

- 조사 개요

- 조사 세부내용

- 조사 성과분석 및 공법 제시

※ 토질 및 암석의 성질에 따른 경제적이고 합리적인 설계자료와 토공, 기초, 가시설, 지반보강, 지하수처리공법 등 제시

- 시추조사 위치도(축척 또는 좌표 명기)

- 시추 주상도

- 지층 단면도(수직, 수평 축척 명기)

- 제 시험 성과표(각 시험성과에는 시험기관 또는 토질 및 기초기술사의 날인 포함)

- 지반조사 사진첩(시추 및 현장시험광경 사진, 시료 사진, 폐공사진 등)

- 작업일지

- 시료보관증(발주기관과 협의 후 결정)

- 기타 감독관이 요구하는 자료

나. 도면 작성

1) 도면은 누락된 부분이 없고 KS A0005(제도통칙)과 KS F 1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

2) 도면 하단의 표제란은 발주기관과 협의하여 결정한다.

3) 모든 도면은 CAD시스템을 이용하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

4) 각 도면은 X, Y좌표를 표시한다.

다. 기타

1)  성과품 작성에 사용하는 용어

- 계약조건에서의 정의, 사용한 용어

- KS등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

- 기술용역 사전에서 정의, 사용한 용어

- 정부제정 제 기준 용어

- 기타 표준국어사전에서 정의, 사용한 용어

2)  성과품 작성에 사용하는 맞춤법

- 한글 맞춤법 및 외래어 맞춤법(교육과학기술부)

- 기본외래어 용어집

3)  기  타

- 도면의 크기는 KS A 5201의 A0-A6에 준한 것을 원칙으로 한다.

- 모든 보고서, 계산서, 지침 등은 A4크기용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면 집계표등을 위해 A3크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

Ⅴ	특기사항

□ 과업은 1차 과업(계획설계 및 중간설계), 2차 과업(실시설계)으로 구분 시행한다.

기본설계 기술제안 추진 확정 시

1) 1차 과업 : 기본설계 (계획 및 중간설계)

- 관계기관과 사전 협의 및 각종 인・허가(건축협의, 실시계획 인가(협조), 각종 인증, 개발행위 허가 등을 포함)에 적합한 설계를 계획하여야 함

- 총사업비관리지침에 따른 계획 및 중간설계 적정성 검토 자료 작성 포함

- 기본설계 기술제안 국토교통부 심의 통과를 위한 각종 자료 작성 및 협조 기간 포함

- 기본설계 기술제안 입찰을 위한 중간설계 단계의 개략 공사비 산출 포함

- 기타 “과업설명서” 내 과업범위 업무일체

2) 기본설계 기술제안 입찰안내서 작성 * 국토부 심의 결과일 기준으로 입찰안내서 즉시 작성(단, 발주기관 요청에 따라 선 착수 가능)

3) 1차 과업(기본설계) 완료 기준으로 계약내용 변경 및 정산*

- 기본설계 : 50%, 실시설계 : 50% 로 공정률 구분*

* 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제6조(설계업무) 참조 : 기본 50%(계획 20%, 중간30%), 실시 50%

기본설계 기술제안 추진 불가 시

1) 1차 과업 : 기본설계 (계획 및 중간설계)

- 관계기관과 사전 협의 및 각종 인・허가(건축협의, 실시계획 인가(협조), 각종 인증, 개발행위 허가 등을 포함)에 적합한 설계를 계획하여야 함

- 총사업비관리지침에 따른 계획 및 중간설계 적정성 검토 자료 작성 포함

- 기본설계 기술제안 국토교통부 심의 통과를 위한 각종 자료 작성 및 협조 기간 포함

- 기본설계 기술제안 입찰을 위한 중간설계 단계의 개략 공사비 산출 포함

- 기타 “과업설명서” 내 과업범위 업무일체

2) 2차 과업: 실시설계  * 국토부 심의 결과일 기준으로 2차 과업 즉시 수행

- 관계기관과 사전 협의 및 각종 인・허가(건축협의, 실시계획 인가(협조), 각종 인증, 개발행위 허가 등을 포함)업무 수행 포함

- 총사업비관리지침에 따른 실시설계 적정성 검토 자료 작성 및 포함

- 실시설계 기술제안 국토교통부 심의 통과를 위한 각종 자료 작성 및 협조 기간 포함

- 기타 “과업설명서” 내 과업범위 업무일체

- (실시설계 기술제안 입찰 추진 확정 시) 실시설계 기술제안 입찰안내서 작성 포함

- (실시설계 기술제안 입찰 추진 불가 시) 설계·시공 분리발주 입찰 추진을 위한 설계과업, 설계적정성 검토, 안전성 검토 등 사전 절차 수행 포함

Ⅵ	설계도서 납품요령

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(확정안)	A3	4	부	-
2	관련법규 검토서	A4	4	부	-
3	유사시설견학보고서	A4	4	부	-
4	추정공사비 내역서	A4	4	부	산출근거 포함
5	현장조사 결과보고서	A4	4	부	-

※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서  * 기본설계 기술제안 기준

구분	설 계 도 서		규격	수량	단위	공 종								비 고
						건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방	인테
1	중간설계보고서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면(반접)		A3	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서	내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비
		관급자재 내역서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		수량산출서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		단가산출서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
		일위대가표	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	지질조사보고서		A4	10	부
5	계 산 서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	시 방 서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방
7	BF인증 관련 검토서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다

※ 제출수량 및 제출도서목록은 발주기관과 협의조정 가능.

※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	설계도면	A1	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도/투시도		2	부	◯							표구 2점 포함 (0.6m*0.9m이상)
15	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
16	USB		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
17	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등
18	자재 견본 자료	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	제품명, 색상, 규격 등 포함

1) 조감도는 제출 시 별도로 A1 규격 5매와 원본File을 USB로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

4) 발주기관 요청에 따라, 제출부수와 규격은 추가할 수 있음.

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

마. 조감도, 투시도(A1 이상, 표구 포함) 각 2부 이상

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품. 끝.

4. 지반조사 및 측량조사

가. 지반조사 종합보고서 5부( USB 3매 포함)

나. 지반조사 조사야장 원본 : 1부

다. 시험성과 원본 : 1부

라. 시료보관 상자 1식(발주기관 요구시)

마. 측량성과표(점의조서)포함 5부

바. 설계도면 : CAD시스템을 사용하고 사용된 한글 FONT를 함께 수록하여야 하며 종류별로 디렉토리를 구성하여 도면은 분리수록 해야 한다.

사. 기타 필요한 데이터 : 호완이 가능한 프로그램으로 작성한다.

5. 설계용역 시행 및 절차 이행

가. 본 설계용역의 시행기간은 착수일로 부터 240일로 함

나. 용역설계 실시 중 검토가 필요하여 발주기관의 요구가 있을 때는 건축, 전기, 소방, 통신, 기계설비 등을 취합하여 부분적으로 정리하여 검토할 수 있도록 협조하여야 함

다. 계약상대자는 계약서에 의한 기일 이내에 설계 제작일정표, 공정별 계약상대자 명부 및 이력서를 첨부하여 착수계를 제출하여야 함

라. 계약상대자 설계추진에 따른 설계진도 보고서를 요구할 시 제출하여야 하며 설계 완료 시 계획 및 중간설계 납품도서를 첨부하여 납품서를 제출하여야 함

마. 공사비 내역서에는 원가계산서, 일위대가표, 자재단가비교표, 수량산출서가 포함되며, 일위대가표와 수량산출서 및 자재단가비교표는 별도 작성하여 제출하여야 함(내역서는 EXCEL 파일로 작성하여 USB에 포함하여 제출)

바. 납품도서 중 건축·기계·전기·소방·통신·철거(폐기물처리공사) 별도로 작성하여 상기 목록별로 제출하여야 함

사. 성과품 납품도서에 표기되지 않은 도서도 발주기관의 요청이 있을 경우 협의 후 납품하여야 함

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 2022 .   .   .

3. 착수  일자 : 2022 .   .   .

4. 완수예정일 : 2022 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실 의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 건설기술(설계)용역계약특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

201 년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

조달청장(국민체육진흥공단) 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약상대자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

조달청장(국민체육진흥공단) 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

조달청장(국민체육진흥공단) 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

조달청장(국민체육진흥공단) 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(201 . . .)	금주예정사항(201 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

조달청장(국민체육진흥공단) 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (201 . . . ～ 201 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

조달청장(국민체육진흥공단) 귀하

〔붙임 7〕 특정자재사용리스트

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

〔붙임 8〕 표준설계관리일정표(예시)-1

* 위의 내용을 참조하여 본 설계의 계약기간과 과업에 따라 설계용역사가 별도로 작성하여 감독의 승인을 득해야 함.

〔붙임 9〕 표준설계관리일정표(예시)-2

〔붙임 10〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

□ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 작성할 것

〔붙임 11〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표

□ ‘표준시방서 코드 링크표’ 는 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 활용할 것