	과업지시서
	용역명 : 국립경주박물관 월지관 수장고 대수선 공사 실시설계
2022. 11.

목      차

Ⅰ. 총칙

Ⅱ. 과업 일반지침

Ⅲ. 과업 세부내용

Ⅳ. 설계도서 작성지침

Ⅴ. 견적․시방서 작성 요령

Ⅵ. 보고서 작성 및 설계도서 납품

과 업 지 시 서

Ⅰ. 총칙

1. 사업 명칭

본 과업의 명칭은「국립경주박물관 월지관 수장고 대수선 공사 실시설계」 용역이라 칭한다.

2. 사업 목적

- 월지관(1982년 개관) 수장고 대수선을 시행하여, 경주박물관 특수수장고의 활용을 증대하고자 함

3. 과업 범위

가. 과업 개요

1) 위치: 경상북도 경주시 인왕동 76번지 국립경주박물관 내

2) 시설: 월지관(지하1층, 지상 2층, 연면적: 2,745.83㎡)

3) 용도: 문화 및 집회시설

4) 용역기간: 착수일로부터 90일간

5) 용역 범위

층별	구조	용도	면적(㎡)
지하1층	철근콘크리트조	수장고	992.40
지하중층	철근콘크리트조	수장고	449.24

가) 건축, 전기, 통신 등 공사 전 분야 실시설계

나) 각종 인·허가 행정 서류 작성(건축허가 등)

다) 각종 조사 비용 포함[폐기물(지정) 조사 등]

* 지상층 전시실 내부 인테리어 제외

나. 과업 범위

1) 현황조사

- 현지 조사

2) 실시설계

가) 현지 조사 결과 제출

나) 실시설계 계획안 제출(평면, 입면, 마감 재료, 평당 건축비 등 비교)

다) 실시설계안 결정 후 예상 공사비 제출

라) 실시설계에 필요한 자료의 수집 및 정비

마) 설계도면 작성

바) 공사 시방서 및 예정 공정표 작성

사) 공사 수량 계산 및 공사 내역서 작성

아) 각종 구조 및 용량 계산서 작성

자) 제반 법규 이행 검토 및 인․허가 등 도서 작성

차) 건물 색채계획서

카) 건축물의 합법적 준공을 위한 건축 및 기타 관계 법령, 모든 인․허가 및 준공서류(건축물대장관련 서류 포함)

타) 기타 □발주처(국립경주박물관)□가 요구하는 사항

4) 다음 사항은 □발주처□와의 협의에 따른다.

가) 배치 및 평면계획 결정

나) 단면 결정

다. 이견 조정

본 과업지시서 및 기타사항에 대하여□발주처□과□과업 수행자□(이하□계약자□)가 의견을 달리하는 경우에는 상호 협의에 의하여 정하고, 협의 불가 시는□발주처□의 의견을 따른다.

라. 관례 준용

본 과업지시서에 규정하지 않은 사항 등에 대하여는 일반관례에 따른다.

마. 과업시행 기간

1) 본 사업의 시행 기간은 착수일로부터 90일간으로 한다.

가) 수급인은 실시 설계(안)를 작성하여 과업 착수 후 30일 이내에 □발주처□에 실시 설계(안)을 제출하여 승인받아야 한다.

나) 실시설계: 실시설계(안) 완료 후 60일 이내. 단, 실시설계 심사 기간 중에는 사업추진 기간을 고려하여 심사 결과 지적 사항에 대한 설계 정정 이행 확약을 받고 준공계 제출을 사업 완료일로 할 수 있다.

2) 과업 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며 다음의 경우에는□발주처□의 승인을 얻어 사업 기간을 변경할 수 있다.

가) 천재지변으로 과업 수행에 차질이 있을 때

나) □발주처□의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업 수행의 중단 또는 과업 내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

다) 당초 과업 시행에서 예측하지 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피하게 된 때

라) 기타 과업과 관련되어 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생 되었을 때

바. 사업수행 상의 적용법규 및 기준

본 사업을 수행함에 있어서는 아래의 관계 법규와 설계기준, 과업지시서에 합당하여야 하며 본 과업지시서에 의문이 있을 때에는 □발주처□와 협의하여 합리적으로 과업을 수행하여야 한다.

<관계 법규〉

- 건축법, 동 시행령, 시행규칙

- 하수도법, 동 시행령, 동 시행규칙

- 소방법, 동 시행령, 동 시행규칙(필요시)

- 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률

- 고압가스안전관리법, 동 시행령, 동 시행규칙

- 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

- 전기사업법, 동 시행령, 동 시행규칙

- 전기공사업법, 동 시행령, 동 시행규칙

- 전력기술관리법, 동 시행령, 동 시행규칙

- 정보통신공사업법, 동 시행령, 동 시행규칙

- 건설산업기본법 및 건설기술관리법, 동시행령, 시행규칙

- 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 기타회계예규․고시등

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동 시행령, 동 시행규칙

- 기타 관계법규일체

<설계기준〉

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

- 건축물의 구조내력에 관한 기준

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

- 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙

- 소방기술기준에 관한 규칙(필요시)

- 전기설비 기술기준, 내․외선규정

- 전기용품 기술기준에 관한 규칙

- 전기용품 시험규정

- 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

- 에너지절약(고효율기기) 설계기준

- 정부 표준품셈 관리 규정

- 정부 건축․토목공사 적산 기준

- 설계도서 작성 기준

- 기타 설계기준 일체

사. 공사비 산출

1) 공사예산조서는 국가계약법에 따른 공사원가 계산서를 첨부하여 작성하여야 한다.

2) 공사비 적산은 “2022 건설 표준품셈, 2022 전기통신공사 표준품셈, 2022 기계설비공사 표준품셈 및 건축공사 적산 기준”에 따라 산출하여야 한다.

3) 공종별 단가는 표준품셈에 의하여 산출하고 특수공정은 제조원가계산서 양식으로 2개 업체 이상의 견적서를 받아 경제적인 단가를 택하여야 한다.

4) 노임단가는 시중노임단가를 적용하여야 한다.(대한건설협회 공표)

5) 재료단가는 조달청 단가를 기준으로 한다.

6) 물량 및 단가적용 등 공사비 산출은 명확한 근거와 정확한 계산에 의거 반드시 책임있게 작성하고 과다 설계 시 모든 책임은□계약자□(설계사무소)가 해결하여야 한다.

Ⅱ. 과업 일반지침

1. 일반사항

가. 설계 도서는 누락된 부분이 없이 구체화하여 현장 기술자들이 정확하게 시공할 수 있도록 상세하게 작성하여야 한다.

나. 각 단계별 보고회 및 자문위원의 자문을 거쳐 심의된 사항을 종합하여 설계에 반영되도록 한다.

다. 관련분야 및 시설 간의 연계가 용이하도록 하고 예상되는 모든 상황과 조건에 적합하도록 설계하여야 한다.

라. 본 과업지시서 일반원칙을 제시한 것으로 □계약자□는 과업지시서 내용에 이의가 없을 경우 임의로 판단해서는 안되며, □발주처□와 검토 및 협의를 거쳐 처리하여야 한다.

마. 모든 시설물은 기능의 충족, 에너지 절약, 건설 및 운용 시의 비용 및 인력 절감 방안 등을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

바. 자재 선정

1) 사용 자재는 국산제품 자재 중 KS제품을 원칙으로 하며 외산재의 사용이 부득이할 경우에는 국산재와 재질상 특성, 구매비용, 조달 비용 및 방법, 기간, 시공 방법 등 기타 필요한 사항 등을 검토한 후 □발주처□와 사전 협의하여 설계하여야 한다.

2) 인체에 무해한 재료를 사용하고 주요 사용 자재는 □발주처□와 사전에 협의하여야 한다.

사. 모든 설계는 시공성, 적합성 등을 감안하여 실현 가능성이 있도록 계획하여야 한다.

아. 설계는 공정성을 고려하여 필요에 따라 구조, 자재, 공법 등을 구체적으로 제시하고 시공 시 안전성, 쾌적성이 유지되도록 계획하여야 한다.

2. 수장고 개선 분야

가. 설계를 수행함에 있어 특수한 기술이나 구조물 안전에 필요한 사항을 전문가의 자문을 받아야 하며 비용은 □계약자□부담으로 한다.

나. 설계도면은 작도가 완료되면 □감독관(국립경주박물관 담당자)□과 사전협의를 필한 후 완성하여야 한다.

다. 시설물의 설계는 차후 부품의 교체, 보수 등 유지․관리에 용이하도록 설계하여야 한다.

라. 시설물은 현실적으로 제작․설치․실행이 가능하여야 하며, 각종 자료를 보유하고 근거를 제시할 수 있어야 한다.

마. 시설물 조명은 전기분야 설계와 연계되어야 하며 상호 협력하여 검토해 누락되거나 중복되는 일이 없도록 한다.

바. 각종 시설물 및 안내시설 등은 환경친화적인 재료를 사용하여야 하며, 안전성, 경제성, 미관성을 고려하되 전체적으로 통일성을 유지하도록 설계하여야 한다.

사. 수장고는 습기, 단열, 차음, 소음, 해충 방지 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지․관리 및 보수에 용이하도록 설계하여야 한다.

아. 공조, 소방, 방범은 최근의 첨단공법을 충분히 검토 및 분석하고, 관련 법규에 저촉되지 않도록 설계하여야 한다.

3. 시설물 설계

가. 설계범위: 공간의 정확한 구획, 유물의 안전한 보호 및 격납 등의 공사에 필요한 설계도서 작성

나. 구성 및 설계

1) 배치와 연출 계획

- 시설물의 구성과 배분

- 수장고 및 전시실 개선 계획(관람 동선 및 유물 이동 중심)

2) 디자인 계획

- 디자인 및 조형물 설계로 건축, 토목, 전기, 소방공사 관련 부분은 설계자 상호간에 협의하여 진행하여야 한다.

4. 수장고 설계 지침

가. 특수수장고 조건에 접합한 합리적인 설계

1) 공조시설은 유물의 온․습도 환경에 알맞게 설계

2) 수장고 출입구, 이동 동선 등을 고려하여 효율적인 방안을 수립하여 설계

3) 관계 전문가의 자문을 거쳐 정확한 도면 설계

나. 에너지 절약형 설계

1) 창, 내․외벽 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계

2) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

3) 기계·공조 및 전기설비는 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조 제2항에 따라 신·재생에너지 설비로 설계

4) 적정 환기시스템으로 최적화 환경을 조성하고, 수장고 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

5) 사용자와 관람객의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

다. 유물 보존 등 수장고 특성상 필요한 설계

1) 해충, 습기 등 수장 환경에 피해가 없는 방식으로 설계

2) 작업 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소화 되도록 설계

라. 방범, 소방, 방재 등에 편리하고 유지․관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지․관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등의 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

5. 보안 수행지침

가. 과업수행으로 인한 자료 등 본 과업수행과정에서 취득한 내용을 외부로 유출하는 등 임의로 사용하여 국가에 손해를 끼쳤을 경우에는 “계약자”가 이에 대한 손해배상책임을 진다.

나. “계약자”는 과업수행 기간 중 모든 과업사항에 대한 보안책임이 있으며 보안규정을 준수하여야 한다.

다. 과업수행 폐기물은 소각처리 하여야 하며 작업용 보안 사진은 “감독관”의 입회하에 폐기 처리하여야 한다.

라. 기타 과업의 특수성 등으로 인하여 과업 수행상 보안 관리를 요하는 사항은 “발주처”에서 보완지시 할 수 있다.

마. “계약자”는 과업착수와 동시에 발주기관 보안업무시행세칙에 의한 보안각서를 제출하고 과업 참여자의 보안각서는 착수보고서 제출 시 함께 제출한다. 과업 참여자가 교체된 경우 즉시 신규 과업 참여자의 보안각서를 제출하여야 한다.

바. 과업 수행 과정에서 생성된 모든 자료나 정보는 “발주처”의 사전승인 없이 타 용도로 사용하거나 외부에 공개 또는 유출하지 못하며 과업 수행 중과실로 인한 손해배상 등 일체의 민‧형사 책임은 “계약자”에게 있다.

사. 과업 참여인원을 최소화하고 정규직원외 참여를 제한하며 필요시 “발주처”의 승인을 받아야 한다.

6. 기타사항

가. 시설물 설치에 필요한 전기․통신․소방 도면을 포함하여 작성하여야 하며, 기존 시설물과의 간섭을 최소한으로 배제하고 기존 시설물 변동 필요시 □발주처□와 상의하여야 한다.

나. 소방시설의 이설이나 변경이 필요시 반드시 관련 법령에 준수하여야 하며, 관련 인허가 필요시 □발주처□와 상의하여 인․허가 서류를 작성하여야 한다.

Ⅲ. 과업 세부내용

1. 철거지장물 조사(필요시)

- 기존 시설물에 대하여 기초 구조물 등 세부적인 조사를 실시하여 철거물량 산출에 반영하여야 한다.

2. 현장 조사

1) 월지관 내․외 환경에 대한 세부적 조사를 실시하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 월지관의 유물 및 공사 자제 반․출입 동선을 고려한 통행 동선 계획을 반영하여야 한다.

3. 평면계획

평면 형태의 결정은 □발주처□와 협의하여야 한다.

가. 사용자의 원활한 접근성과 이용상 편리성을 도모할 수 있는 동선 계획

나. 출입 공간을 충분히 확보하여 사용자와 관람객의 진․출입 동선에 지장이 없도록 계획

다. 냉․난방시설에 지장이 없도록 피트 등 구조물 고려

라. 최적의 환기시스템 구축

4. 구조계획

가. 건축물의 구조 안전 확인 및 협력 등에 관한 업무지침(‘07. 5. 1부터 시행)에 따라 구조안전(고정하중․적재하중․풍압․지진․기타의 진동 및 충격 등) 확인

나. 시공상 특수공법이거나, 특수구조에 대하여는 공인기관(대한건축학회, 공인 연구소, 국립대학 등)의 기술검토서를 첨부하여야 하고 주요구조부에 대하여 충분한 응력을 계산하여 안전하게(내진설계 규정에 적합한 구조) 설계

5. 설비계획

가. 건축부문

1) 난방시설, 2) 급․배수의 위생시설, 3) 환기시설, 4) 기타 부대시설, 5) 기타 관련설비 계획

나. 전기부문

1) 간선설비, 2) 전등, 전열 및 동력설비, 3) 접지설비

다. 소방부문

1) 소방방재설비, 2) 화재경보설비, 3) 기타 부대설비

라. 방범부문

1) CCTV 설비, 2) 기타 부대설비

Ⅳ. 설계도서 작성지침

1. 설계도서 작성 원칙

가. 작도용 용지

설계도면은 CAD로 작성하고 제도용지를 사용하며 외장하드로 제출하여야 한다.

나. 도면규격과 양식

도면 원고의 크기는 A3로 하고 윤곽선, 건명판 등 양식은 별도 승인을 받아 사용하여야 한다.

다. 기입치수 및 단위

설계도면에 기입되는 모든 단위는 미터법으로 하고 치수는 ㎜로 표시하여야 한다.

라. 표기문자

표기문자는 한글 사용을 원칙으로 하되 한글만으로 이해가 어려울 경우와 “감독관”이 지정하는 곳은 영문 및 한자로 병행 표기하며, 표기 숫자는 일체 아라비아 숫자를 사용하여야 한다.

마. 축 척

도면 축척은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일 종류에 대하여는 가능한 축척을“감독관”과 통일시켜야 한다.

2. 도면 작성 일반요령

가. 도면작성 시 일반요령

모든 도면상에는 가능한 한 측부호, 라멘부호 설명을 기입하여 어느 부분인가를 알기 쉽게 작성하여야 한다.

나. 건축 도면 작성 시의 다음 특기사항 중 설계에 필요한 사항을 적용하여야 한다.

1) 건축 일반 설계 도면에는 다음 내용을 표시하여야 한다.

(1) 도면 목록표

(2) 배치도 : 축척, 방위, 옹벽, 오·배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 등 기타 시공에 필요한 사항

(3) 면적 산출표

(4) 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

(5) 각층 평면도, 단위 평면도

(6) 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(7) 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

(8) 지붕 평면도

(9) 입면도(4면)

(10) 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

(11) 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(12) 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(13) 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(14) 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(15) 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

(16) 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(17) 기타 시공에 필요한 사항 일체

2) 건축구조 도서에는 다음 내용을 포함하여야 한다.

(1) 각부 구조평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(2) 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

(3) 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(4) 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

(5) 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(6) 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

(7) 기타 시공에 필요한 사항 일체

3) 평면도의 각 실명, 실번호, 실면적을 직접 기입하여야 한다(축적 1/30 ～ 1/200).

4) 중요한 부분은 반드시 부분 상세도(축적 1/5 ～ 1/30), 평면, 전개도, 부분단면 상세도 등을 작성하여야 한다.

5) 구조도의 철근정착 이음 등을 정확히 표시하고 라멘이 다를때마다 반드시 라멘 배근도를 작성하여야 한다.

6) 창호기호 표시는 평면도에 표시가 복잡하면 별도 창호평면도를 작성할 수 있으며, 창호도는 개소, 크기, 위치, 재질, 부속철물 등을 상세히 명기하여야 한다.

7) 천정 평면도는 반드시 작성하고 천정 부착 전등 기구를 전기설계 또는 기타 도면과 부합하도록 작성하여야 한다.

8) 설계도서에는 건축법규 및 관계 해당 법규에 위배되지 않아야 한다.

다. 기계도면 작성 시의 특기사항

1) 기계 설치 및 설계도서 작성 시 건축과 전기설계에 부합되도록 상호 협조하여 작성하여야 한다.

2) 옥내 주배관 종․횡단면을 작도하고 배관의 구배를 표시하여야 한다.

3) 평면도에서는 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 취부상세 및 부분별 상세를 반드시 작도하여야 한다.

4) 중요한 시공 부분은 평면도 이외에 계통도를 다이어그램으로 표시하여야 한다.

5) 축적 1/100의 건축 평면도에 설계하여야 하고 반드시 축부호, 라멘부호를 기입하여 어느 부분인지가 쉽게 알아볼 수 있도록 한다.

6) 옥내 PIT 난방 배관의 구배는 순구배로 하여야 하고 건축 구조상 보(B-EAM)를 통한 경우에는 보관통 스라브 도면을 별도 작성하여야 한다.

7) 주요 부분이 1/100 도면으로 해독하기 어려운 곳은 반드시 확대 평면상세도(1/50 또는 1/300), 단면상세도를 작성하여야 한다.

8) 각종 배관의 구배는 관계 규정에 충분하도록 건축 등에 반영하여 기능을 발휘하는데 무리가 없도록 하여야 한다.

9) 기타 설비관련 부대시설에 대한 도면을 작성하여야 한다.

다. 전기 및 통신 도면 작성 시 특기사항

1) 설계 시 작성된 건축과 기계 등 제반 설계내용과 부합되도록 상호 협조하여 작성하여야 한다.

2) 평면도는 반드시 전등, 전열, 동력, 간선 등으로 각각 작성하여야 한다.

3) 주요한 부분은 반드시 평면 상세, 단면, 부분상세도를 작성하여야 한다.

4) 각종 제어반의 결선도 내부 및 외부상세도를 작성하여야 한다.

5) 각종 제작품은 상세한 제작도면을 작도하여야 한다.

6) 평면도에서 표기된 식별하기 곤란한 부분은 취부 상세 및 부분 상세를 반드시 작도하여야 한다.

7) 모든 설계도는 전기설비기술 기준 및 관계 해당 법규에 위배 되지 않도록 한다.

라. 상세 통일

본 사업의 설계는 주위 환경에 부합되도록 통일성 있게 처리하여야 하며, 각종 상세 부분의 표준안을 사전에 “감독관”과 협의한 후 본 설계 도면을 작성하여야 한다.

3. 설계 유의사항

가. 각 설계도서는 더 이상의 세부 설계가 없도록 최대한 분야별로 구분하여 작성하여야 한다.

나. 각 설계도서는 제반 법규에 적합하게 작성하여야 한다.

다. 건축, 전기, 통신, 기계, 설비, 소방, 조명, 음향 등 각 분야는 서로 상충되는 부분이 없도록 충분한 협의를 거쳐 설계하여야 한다.

라. “계약자□는 설계내용 및 자료에 대한 보안 조치를 하여야 한다.

마. 설계용역에 필요한 문의나 건의할 사항이 발생되었을 때는 “감독관□과 협의하여야 한다.

바. 용역자는 해당 관청에 도시계획법, 건축법 등 해당 법규나 조례의 규정에 의거 건축협의 및 준공 후 건축물 관리대장 종료 후까지 완결해야 한다.

사. 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

아. 기타 과업지시서에 명기하지 아니한 사항은 각 “발주처□ 및 “감독관□과 협의하여 처리하여야 한다.

자. □발주처□가 공사를 당해연도에 미추진 또는 시공계약자 미선정 등의 사유로 물가 변동으로 인한 내역변경 요인이 생길시□계약자□는 이에 대한 내역서를 조건없이 작성 제출하여야 한다.

Ⅴ. 견적․시방서 작성 요령

1. 견적서 작성

가. 물량의 산출은 정미량 산출을 원칙으로 한다.

나. 공인물가조사지에 없는 비목은 시장조사 물가를 적용한다.(일식 품목은 2개소 이상 견적서 제출하고 세부 산출근거 첨부)

다. 적용품셈은 당해년도 건설공사 표준품셈에 준하고 노임단가는 대한건설협회 최근 시중 노임단가를 기준으로 한다.

라. 공사자재 용 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요자재는 관급으로 하고 이에 대한 조서를(시방서, 설계도서 등) 작성하여야 한다(기타분야는 용역감독원과 사전협의 결정).

※ 국산 재료비 단가는 2개(조달청 가격정보지 필히 포함) 이상 조사하여 그중 가장 낮은 단가를 적용하고 최종 납품시 단가비교표를 필히 납품하여야 한다.

※ 물량 및 단가적용 등 공사비 산출은 명확한 근거와 정확한 계산에 의거 반드시 책임있게 작성하고 과다설계시 모든 책임은 □계약자□(설계사무소)가 해결하여야 한다.

마. 품질시험 대상품목(건진법 시행규칙 제40조 제3항 관련)을 조사 작성하고 품질시험비는 원가계산서에 계산한다.

바. 설계도서는 전산설계하여 입력된 PC용 외장하드를 제출하여야 하고 전산설계시 행정전산망 다기능기로 이용 가능한 원가계산 소프트웨어를 이용하여야 한다.

사. 공사 발주용 설계도서는 다음과 같이 구분 작성하여야 한다.(기타 자세한 사항은 담당 □감독관□과 협의한다)

1) 건축공사 발주용[건축(실내건축포함)+설비(기계)+건축토목 및 조경공사 등 기타]

2) 전기공사 발주용

3) 소방공사 발주용

4) 통신공사 발주용

2. 시방서 작성

가. 공사시방서는 건설교통부 제정 표준시방서의 내용을 기본으로 하여 작성하여야 한다.

나. 공사시방서는 공사의 질적 요구조건을 규정하며, 계약서류에 포함되는 설계도서의 하나로서 법적 구속력을 가지며 공사에 필요한 시공방법, 상태, 허용오차 등 기술적 사항을 규정하여 견실 시공이 되도록 하여야 한다.

다. 시공상세도면 목록을 관계 규정에 적합하도록 작성하여 시방서에 표기하여야 한다.

라. 건설기술관리법 규정에 의한 품질관리시험 대상, 품목, 검사방법, 판정기준 등을 상세하게 작성하여야 한다.

마. □발주처□와 건설업자 사이의 책임범위와 한계를 명시하여야 한다.

바. 각 시설물별 표준시방서의 기술기준 등 서로 상이한 내용(토목공사일반시방서, 건축공사표준시방서, 콘크리트표준시방서 등)은 공사의 특성, 지역 여건에 따라 선택 적용하여야 한다.

Ⅵ. 보고서 작성 및 설계도서 납품

1. 보고서 작성

가. 보고서의 내용은 공사시행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서 이어야 하며, 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

1) 과업의 목적, 내용, 기간, 과업수행지침

2) 사전조사 사항

3) 설계기준

4) 세부 시공계획

(가) 공종별 비교검토 내역, (2) 구조물 및 수리계획, (3) 기타계획

5) 세부공사비 산정

6) 기타 필요한 세부 사항

7) 참여기술자의 명단

8) 기타 □발주처□의 요구사항 및 참고사항

나. 구조계산서, 수량산출서, 단가산출서 등은 별도 도서로 작성하여야 한다.

2. 성과품의 인쇄

본 과업의 모든 성과품 인쇄 시 □발주처□의 승인을 득한 후 시행하여야 한다.

3. 수시보고서 제출

□계약자□는 본 과업 수행 중 공법 검토사항 조사내용 및 각종 중요 결정사항에 대하여 □발주처□에 수시 보고서 및 현황판을 작성 제출하여야 한다.

4. 용역결과 성과품 납품 목록(설계도서 작성지침 참조)

종 류	규 격	부 수				비 고
		건축	전기	통신	소방
설계도면	A3	4부	4부	4부	4부
설계설명서	A4	3부
공사시방서 (특기(전문)시방서)	A4	3부	3부	3부	3부
각종설계계산서 (구조,설비,전기통신 등)	A4	3부	3부	3부	3부
각종 설계기준 및 자료	A4	3부	3부	3부	3부
내역서	A4	3부	3부	3부	3부
일위대가표	A4	3부	3부	3부	3부
단가조사서	A4	3부	3부	3부	3부
수량산출서	A4	3부	3부	3부	3부
공사예정공정표	A3	3부
CD 또는 USB	-	상기 전체내용 3매
기타 발주청 요구사항
ㅇ “발주처□ 요구 시 납품 부수의 증감을 수용하여야 한다. ㅇ 설계성과품 납품시 개별 발주가 가능하도록 다음과 같이 구분하고 용역 감독관과 협의하여 제출 (1) 건축(설비포함), (2) 전기공사, (3)소방공사 (4) 통신공사 ㅇ 각종 인․허가 등에 필요한 설계도서 별도 작성 납품(착공후 설계변경에 따른 인․허가 변경서류의 설계도서 포함)

5. 기타사항

가. 본 과업기간 중에라도 공사 시행을 위하여 □발주처□가 요구하는 자료가 있을시 필요한 설계도서를 중간 납품하여야 한다.

나. 설계심사(일상감사, 공사원가심의 등)

- 설계심사결과 수정 또는 보완이 필요한 사항에 대하여는 본 실시설계 납품일 이후라도 보완하여야 한다.

다. 용역 중지 또는 용역기간 연기

- □계약자□형편상 또는 부득이한 다음의 경우에 용역의 일부 또는 전부를 중지할 수 있다.

1)□발주처□의 계획변경 또는 타 사업과 관련이 있을 경우(예상 공사비 부족 등)

2) 유관기관과의 협의 지연으로 더이상 용역수행이 곤란한 경우

3) □계약자□가 사업수행 중 □감독관□의 정당한 지시에 응하지 않을 경우, 단 이 경우에 발생하는 □계약자□의 손해는 □발주처□에 보상을 요구할 수 없다.

라. 사업비 정산

1) 본 사업비용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시 제2020-635호)」에 따라 산출하였는바, 설계 결과 산출된 공사비가 사업비 산출을 위하여 적용한 공사비에 미달된 경우 적용 요율에 따라 사업비를 감액함을 원칙으로 한다.[단, □발주처□ 요구에(사업변경 등) 의한 공사비(사업량 감소) 감소는 이에 해당하지 아니한다.]

2) 본 사업에 대하여 감사 지적 등으로 변상이 발생 시는 □계약자□가 변상액 전액을 변상하여야 한다.

3) 설계에 대한 검수는 납품 후 소정기일 내에 하되, 사업비의 지급은 지방계약법에서 정한 지급 기일 내에 지급한다.

4) 사업 진행 중 설계오류에 의한 설계변경사항은 무대가로 설계변경 관련 수정 도서(변경도면, 및 내역서 등)를 일체 제출하여야 한다.

	설 계 용 역 비 산 출 내 역
	용역명 : 국립경주박물관 월지관 수장고 대수선 공사 실시설계
2022. 11.