제 안 요 청 서
“KOREA 360 프로젝션 맵핑 공간 조성 위탁용역”

2023. 01.

Ⅰ. 제안 요청내역

1. 사업 개요

ㅇ 용 역 명 : KOREA 360 프로젝션 맵핑 공간 조성 위탁용역

ㅇ 사업목적 : 인도네시아 자카르타에 위치한 KOREA 360 홍보관 내 신기술융합 콘텐츠 전시를 위한 프로젝션 맵핑 공간 조성

ㅇ 용역기간 : 계약체결일로부터 2023년 03월 17일까지

ㅇ 용역비(추정금액) : 금217,040,000원정(이억일천칠백사만원정/VAT 포함)

2. 사업 내용

ㅇ 과업 범위

- 설치 공간에 대한 사전조사 및 분석을 통해 적합한 프로젝션 맵핑 장비 설계

- 공간에 적합한 프로젝터 장비 수급 및 설치

- 프로젝션 맵핑을 위한 서버 및 운영 시스템 구축

- 안정적인 운영을 위한 비대면 유지보수, 장애대응 방안 수립

ㅇ 설치 공간 개요

- 위치 : 인도네시아 자카르타 롯데쇼핑애비뉴 GF층

- 전체 면적 : 37.9㎡ (맵핑 벽 면적: 38.48㎡, 바닥 면적: 21.88㎡)

공간 평면도	전기 도면
벽 면적 : 38.48㎡ 바닥 면적 : 21.88㎡

3. 추진 일정(안)

ㅇ 입찰공고 및 선정 : ~2월 1주

ㅇ 착수계 제출 : ~2월 10일

ㅇ 장비 확정 및 수급 : ~2월 28일

ㅇ 장비 및 시스템 설치 : ~3월 3일

ㅇ 장비 테스트, 교육, 매뉴얼 및 체크리스트 제작 : ~3월 15일

ㅇ 최종 결과보고 : 3월 17일

Ⅱ. 제안 요청사항

1. 제안 요청내용 및 용역 범위

※ 용역 추진을 위한 전체적인 구성 및 운영방안을 제시하되, 발주처와 협의하여 최종 결정함

※ 대행사의 과업범위 세부내역은 최종 계약체결(협상) 시 아래 내용에서 조정될 수 있음

가. 장비 설치공간 사전조사 및 분석

ㅇ 공간에 대한 사전조사 및 분석을 통해 최적의 장비 설계를 제안하여야 한다

- 다양한 한국의 미디어아트, 신기술융합 콘텐츠 전시 사례 조사를 통해 고스펙의 장비 제안 필수

- 프로젝터의 안정적인 운영 및 유지보수를 위한 서버 및 운영 시스템 제안 필수

※ 인도네시아 내 쇼핑몰에서 장기간 상시 운영한다는 특성을 반드시 고려해야 함

프로젝션 맵핑 예시

나. 프로젝터 장비 및 서버·운영 시스템 설치

ㅇ 아래 물품은 규격서 사양과 동등 또는 그 이상의 제품으로 제안하여야 한다

ㅇ 아래 모든 물품은 사전에 담당자와 협의 후 자재승인을 득하여 선정해야 하며, 반드시 지정된 위치에 설치 및 연동하여야 한다

구분	내용	규격/사양	단위	수량	비고
프로젝터	빔프로젝터	밝기 10,000ANSI, 해상도 FHD/4K, DPL LASER	EA	제안	프로젝터 모델에 따라 사양 및 수량 제안 가능
	프로젝터 옵션렌즈		EA
	프로젝터용 송수신기	4K HDMI Extender	SET
	브라켓	천정설치용 봉브라켓 타입	SET
시스템	Product Server	Watchout 서버	SET	1	인도네시아 현지에서 원활히 운영 가능한 서버 및 시스템으로 자유롭게 제안 가능
	Display Server	Watchout 탑재 6채널 수용	SET	2
	맵핑 솔루션	WATCHOUT, Immersive Display Pro	식	1
	운영 콘솔	24인치 모니터, 키보드, 마우스 세트	SET	2
	기타	통신 작업 등	식	1

- 규격서에 명시된 내용 외에도 안정적인 프로젝션 맵핑 공간 운영을 위해 필요한 장비/시스템은 필히 수급 및 설치해야 한다

- 기존에 구축된 음향시스템과 원활한 연결을 위해 시공 업체와 조율 및 협조하여야 한다

ㅇ 프로젝터를 제외한 모든 장비는 오퍼레이팅 룸 내 별도의 데스크 및 랙을 구축, 이에 장착하여 보관 및 관리가 용이하도록 구성한다

다. 장비 납품

ㅇ 인도네시아 자카르타에 설치하는 점을 고려하여 착수계에는 인력 출장계획 또는 현지 인력 활용계획, 장비 운송계획을 수립하여야 한다. 단, 장비에 대한 해외 운송은 발주처의 별도 용역으로 진행 예정

ㅇ 각종 장비의 납품 시 발주자 입회하에 승인을 득하여야 한다

ㅇ 납품 완료 후 발주자의 입회하에 시운전을 실시하며 인수인계는 서면으로 하며 감독원의 승인을 득하여야 한다

ㅇ 도급자는 기술사양을 필히 숙지하여 모든 제품은 정품, 완제품으로 공급하여야하며, 주요 구성품ㆍ부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다. 또한 COPY 제품은 제외하며, 감독관이 필요하다고 인정되는 서류 요구 시 제출해야 한다

ㅇ 사용설명서를 발주자 측에 제출하여 조작이 편이하도록 하여야 한다

ㅇ 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다. 단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제작품은 분해 운반할 경우 도급자 책임으로 재조립한다

ㅇ 납품 기한(납품설치, 시운전)은 3월 3일까지 한다. 단 감독관의 지시에 의하여 상호 납품일자를 조정할 수 있다

ㅇ 납품 장소는 자카르타 롯데쇼핑애비뉴 GF층으로 하며, 쇼핑몰 내 반입에 필요한 절차는 도급자가 수행한다

라. 기자재 검사 및 사용자 교육

ㅇ 도급자가 납품 완료 검사 및 시험에 전량 및 표본 검사에 합격한 후 사전 당사에 입회 요청하여 당사 감독원에 의한 아래 시험을 전량 및 표본 검사를 실시하여 합격하여야 한다

ㅇ 도급자는 각종 장비운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 발주자의 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 발주자가 자체 운영능력을 갖출 수 있도록 H/W 및 S/W에 대한 운영교육을 충분히 실시하여야 한다

ㅇ 도급자는 발주자의 요청에 따라 교육대상과 시기를 정하여 운용자가 숙지할 수 있도록 2회 이상 실시하여야 한다

ㅇ 도급자는 추후 유지보수 및 관리를 위하여 교육 이외에 장비/시스템별 사용매뉴얼을 제작하여 인수인계를 지원한다

ㅇ 기자재 검사는 기기의 특성 및 당사의 의견에 따라 생략 또는 당사가 위촉한 검정 대행 요원에 의한 검사로 대행할 수 있다

ㅇ 설치 중 은폐되는 부분에 대하여는 천연색 사진을 비치하여 수시 열람할 수 있게 하여야 한다

ㅇ 검수과정에서 발견되지 않은 하자가 추후 발견될 경우 하자 통보를 받은 날로부터 7일 이내에 보완해야 하며, 이때 비용은 도급자가 전액 부담하여야 한다

마. 재해 방지 및 피해 대책

ㅇ 납품 중 발생되는 모든 사고는 도급자가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 고용인에게 필요한 모든 교육 또는 지시를 작업 전에 시달하며, 항상 주의를 환기 시켜 안전사고를 미연에 방지한다

ㅇ 납품 중 기기가 손상될 우려가 있을 시에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다

ㅇ 제품의 운반ㆍ설치 시 도급자의 귀책사유로 제품에 하자가 발생하였을 경우도급자는 신속하게 신품으로 교체 설치하여야 하며, 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정ㆍ기술적 문제의 처리는 도급자자가 책임을 지고 즉시 복구 및 변상조치 하여야 한다.

ㅇ 작업 중에 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 감독원에 보고하고 도급자 부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 원상 복구 및 사후 조치를 취하여야 한다

바. 유지보수 방안

ㅇ 도급자는 설치 후 유지보수를 위한 예방정비 계획을 수립하여야 한다

- 비대면 장애 처리절차 방안 등 비상계획을 수립한다

- 설치 후 1년간 기술지원 인력을 투입, 발주처가 별도 선정한 운영 대행사에 협조하여 A/S를 지원한다

- 예방점검을 위한 체크리스트를 작성하여 제공한다

ㅇ 도급자는 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 준공일로 부터 2년간 성능을 보증하며, 이 기간 중 발생하는 모든 하자에 대해 도급자 비용으로 최단 기간 안에 신품으로 교체하여야 한다

- H/W, S/W 응용체계를 지원한다(업그레이드 포함)

ㅇ 하자보수 기간 동안 장애 통보를 받은 후에는 12시간 이내 정상 가동토록 조치하여야 하며, 이를 위한 원격제어 시스템 및 필요시 현지 운영 인력 네트워크를 구축하여야 한다

ㅇ 장애발생 통보 후 복구 완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 하며, 주요부품에 대해서는 예비 장비를 확보하여 치명적인 장애에 대비하여야 한다.

사. 기타

ㅇ 도급자는 장비 설치 시 입점 공간인 롯데쇼핑애비뉴의 가이드라인에 따라 공간 내외부 케이블용 배관 배선 및 모든 케이블을 포설하여야 한다

ㅇ 도급자는 장비 설치에 필요한 전원 연결 작업을 수행하여야 하며, 필요할 경우 롯데쇼핑애비뉴 기술 담당자와 미팅을 가질 수 있다

ㅇ 도급자는 제안요청서에 명기되지 않은 사항일지라도 과업 완수에 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 하며, 이에 따르는 제반 경비는 상호 협의 하에 도급자가 부담하여야 한다.

2. 과업 보고 및 성과물 제출

가. 착수시

구 분	부 수	제출시기	비 고
1. 착수계	1부	계약 후 5일 이내
2. 장비 설계 제안서	〃
3. 납품설치 공정표	〃
4. 보안서약서(대표자, 작업인원)	〃
5. 비밀유지계약서	〃
6. 참여기술자 명단	〃

구 분	부 수	제출시기	비 고
1. 완료계	1부	검수 시
2. 납품내역서	〃
3. 주요장비 공급자증명 및 AS확약서	〃
4. 장비/시스템별 사용매뉴얼	5부
5. 장애 처리절차 매뉴얼
6. 예방점검 체크리스트
7. 납품설치 전/중/후 사진대장	1부
8. 보안확약서	〃

나. 검수시

Ⅲ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 목차

Ⅰ. 제안 개요

1. 사업목표 및 범위

☞ 제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 용역에 대한 목표와 범위를 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다.

2. 제안 내용의 특징과 차별성

☞ 투입인력의 우수성, 전문성 등을 기재하시고, 본 용역과 유사한 프로젝트 수행내용 및 본 용역을 위해 타 기관과 차별화 하여 제안하는 내용이 무엇인지 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다.

Ⅱ. 사업수행 부문

1. 사업수행체계

☞ 본 용역을 성공적으로 수행하기 위해 조직을 어떻게 구성하고, 운영할 것인지에 대하여 기술하여 주시기 바랍니다.

2. 사업수행방안

☞ 본 용역의 주요과업인 KOREA 360 프로젝션 맵핑 공간 조성에 대해 어떻게, 무엇을 제공할 것인지 구체적인 방법 및 방안을 기술하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 사업관리 부문

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 일정계획과 사업관리방안을 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다.

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 집행계획을 기술하여 주시기 바랍니다.(필수)

* 작성예시(금액작성금지, 비율만 작성, *항목은 용역특성에 따라 변경가능)

*항목	예산 내 집행비율
인건비	0%
부스시공	0%
비즈니스 매칭	0%
현장운영	0%
인쇄 및 홍보물	0%
기타 운영비	0%
관리비 및 이윤	0%
합계	100%

※ 제안서 작성 시 유의사항

- 제안서는 반드시 20Page 이내(표지 제외)로 작성(도표, 그림 등 활용가능)하여 주시기 바랍니다.

- 제안서 20Page는 요약서가 아니며 구체적인 용역 수행내용 및 결과를 제시바랍니다.

☞ 제안사는 용역 수행 결과물을 구체적으로, 알기 쉽게(그림 등) 제시하여야 하며, 성공적인 결과물을 만들어내기 위해 필요한 수행방안, 방법 등도 구체적으로 제시하여야 합니다.

- 제안서 목차는 변경, 추가할 수 있습니다.

2. 제안서 작성지침

ㅇ 제안서는 원본 1부, 업체정보 삭제본 1부를 제출하여야 합니다.

- 업체정보 삭제본에는 제안업체가 어디인지 알 수 있는 부분은 삭제바랍니다.

- 제출된 제안서의 편집 오류 또는 누락 등으로 인해 발생할 수 있는 평가 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있으니 주의바랍니다.

ㅇ 제안서는 반드시 20쪽 이내로 작성하되 다음 사항들을 중심으로 기술 바랍니다.

- 제안사가 추진하고자 하는 핵심사항

- 동 사업을 성공적으로 추진하기 위한 제안업체의 사업관리방안

ㅇ 제안서는 아래 서식에 준하여 한글(hwp) 또는 워드(doc)로 작성해주시고, 문서 하단에 쪽 번호 매기기를 꼭 해주시기 바랍니다. (공정한 평가를 위하여 PPT 작성 금지)

Ⅰ.   <13 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.   <12 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.1  <11 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

가.  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

◦  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

<11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

ㅇ 제안서는 반드시 한국어로 작성되어야 하며, 영문 약어 사용 시 약어 풀이를 기술하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서는 명확한 용어 및 표현을 사용하여 작성해주시고, ‘~할 수 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~을 고려하고 있다’ 등과 같은 모호한 표현은 제안서의 평가 시 불가능한 것으로 간주되오니 주의바랍니다.

ㅇ 정보시스템의 구축 또는 시설 구축 등 기술적인 설명 자료가 필요한 경우에는 별첨 자료를 제출할 수 있습니다.

ㅇ 별지는 필히 지정된 양식을 준수하여 작성해 주시기 바랍니다.

3. 제안서 효력

ㅇ 제출된 제안서 내용은 한국콘텐츠진흥원에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 수행기관으로 선정 시 계약조건으로 간주됩니다.

ㅇ 한국콘텐츠진흥원은 필요에 따라 제안자에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가집니다.

Ⅳ. 선정 및 평가

1. 선정방법

가. 기본방침

ㅇ 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 동 사업을 효율적으로 수행하기 위한 최적의 수행기관을 선정하는 것이 기본방침입니다.

나. 적용규정

ㅇ 한국콘텐츠진흥원 계약사무처리규칙, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」및 기획재정부「(계약예규) 협상에 의한 계약 체결기준」등을 근거로 합니다.

다. 선정절차

입찰공고		입찰서 및 제안서 접수 마감		기술평가(진흥원) + 가격개찰(조달청)		기술 및 가격 협상		최종수행기관 선정		계약 체결
				1단계		2단계		3단계		4단계

1) 1단계 : 제안서 평가 [기술+가격]

ㅇ 기술평가(80점)

- 진흥원에서 평가위원회를 구성(7인 내외)하여 평가기준에 의거, 제안서를 평가(서류평가, 발표평가 및 질의응답)합니다.

- 평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정합니다. (평가 점수 단위를 소수점 둘째 자리까지, 셋째자리 이하는 절사)

ㅇ 가격평가(20점)

- 협상에 의한 계약체결 기준에 명시된 가격 산출방식에 따라 조달청 (나라장터) 시스템을 통해 개찰합니다.

ㅇ 제안서(기술 및 가격) 평가 결과, 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정하게 됩니다.

- 협상 순서는 협상 적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점 순으로 결정합니다.

- 합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상인 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하며, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 합니다.

2) 2단계 : 협상 실시

ㅇ 종합점수 1위 업체부터 기술협상을 진행하며, 선순위 업체와의 협상에서 합의가 이루어지면 후순위 업체와의 협상은 생략하게 됩니다.

ㅇ 협상을 통한 합의가 이루어지지 않을 경우, 동일한 기준과 절차에 따라 후순위 업체와 협상을 실시합니다.

2. 평가항목

ㅇ 다음과 같은 평가항목과 비중을 가지고 평가하고 본 사업의 현실과 상황에 맞게 조정될 수 있습니다.

ㅇ 평가항목

평가항목	세부평가내용	배점
수행기관 전문성 (20)	제안 업체가 본 사업을 수행하기 위한 전문성을 갖추고 있는가?	20점
	ㅇ 본 사업을 수행하기 위한 전문 인력 및 고품질의 장비수급 파트너를 확보하고 있는가? ㅇ 해당 사업에 대한 전문지식을 갖추고 있는가?
사업 이해도 (15)	사업의 목적과 취지에 대하여 정확히 이해하고 있는가?	15점
	ㅇ 설치공간 및 환경의 특성과 한계점을 명확히 이해하고 있는가? ㅇ 장비 설치의 목적과 그 기대효과를 정확히 제시하고 있는가?
사업 수행능력 (30)	사업 수행을 위하여 제시한 사업계획이 구체적이고 실현가능한가?	30점
	ㅇ 설치공간에 대한 사전조사와 분석을 토대로 제안요청에 적합한 장비를 제안하고 있는가? ㅇ 수행기간 내에 제안한 장비를 인도네시아 현지에 안정적으로 납품 및 설치할 수 있는 구체적인 방안을 갖추고 있는가? ㅇ 제안 장비에 대한 적절한 검증/보완방법을 제시하고 있는가? 이를 위한 각종 전문인력 네트워크를 보유하고 있는가?
사업 관리방안 (15)	제안 내용을 적절히 관리하기 위한 방안을 갖추고 있는가?	15점
	ㅇ 납품 중 발생되는 사고를 방지하기 위한 교육 계획을 갖추고 있는가? ㅇ 사업 추진 일정과 사업비 집행계획이 합리적으로 제시되고 있는가? ㅇ 사후 하자 및 유지보수에 대한 계획을 구체적으로 제시하고 있는가?
소 계		80점
가격평가 (20)	ㅇ 입찰 가격 평점산식에 의거 산정	20점
합 계		100점

Ⅳ. 별지서식

서식번호	서식명
별지 제1호 서식	제안서 표지
별지 제2호 서식	일반현황 및 연혁
별지 제3호 서식	참여인력 현황 총괄표 (별도 전산입력도 해야 함)
별지 제3-1호 서식	참여인력 이력사항
별지 제6호 서식	정보 비공개 동의서 (계약체결 시 제출)
별지 제7호 서식	개인정보 수집·이용·제공 동의서
별지 제8호 서식	용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정이 무효화됨을 알려드립니다.

【별지 제1호 서식】

제안서 표지

“KOREA 360 프로젝션 맵핑 공간 조성 위탁용역”

제   안   서

접수번호 :

【별지 제2호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사 명	⁂	대 표 자		⁂
사업분야		사업자번호		⁂
주 소	⁂
전화번호	⁂		FAX		⁂
해당부문종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁 (업체정보 삭제본 작성시 계열사 작업수행 내역 등 제안업체를 알 수 있는 항목 전체 삭제)

⁂ 표시된 항목은 업체정보 삭제본 작성 시 공란으로 두시기 바랍니다.

【별지 제3호 서식】

참여인력 현황 총괄표

(제출일 기준)

번호	성명	담당업무	해당분야 근무경력	참여율	비고

- 본 용역에 투입할 전체인력(채용 예정인력 포함)에 대하여 기재하시기 바랍니다.

- 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재하시길 바랍니다.

＊투입인력이 수행하는 본 용역 포함 모든 용역 등에서 월별 참여율 100% 초과 불가

＊월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

<작성 시 유의사항>

＊참여인력 및 이해관계자리스트는 신청기관과 이해관계가 있는 자가 평가위원으로 선정되지 않도록 하는 용도로 활용하며, 본 총괄표에 기재되지 않거나 잘못된 정보가 기재되어 이해관계자가 평가위원으로 참석할 경우는, 신청기관에게 불이익이 있을 수 있으니 빠짐없이 작성바람

＊서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사 제외 및 계약 파기 할 수 있으며 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

<세부작성 방법>

＊경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

＊PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

＊채용 예정인력의 경우 현 시점에서 확인할 수 있는 수준에서 정보를 기재

＊지도교수는 대표자 및 책임자가 석사 이상인 경우, 최종학위의 지도교수를 기재해주시기 바라며(석사, 박사 등 학위가 여러 개인 경우 모두 기재), 지도교수의 경우 기관명(소속 학교명), 성명, 성별코드만 작성

＊위 참여 인력 현황 총괄표는 사업관리시스템 별도 입력해야 하며, 위에 입력한 내용과  사업관리시스템에 입력한 내용이 다를 경우 평가에서 불이익이 있을 수 있습니다.

【별지 제3-1호 서식】

참여인력 이력사항

※ 사업별로 참여율 기재(입찰 현재 기준 참여인력의 모든 사업 포함)

※ 경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

※ PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

※ 서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사 제외 및 계약을 파기 할 수 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

※ 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재

※ 월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

※ 최종 계약체결 시 월별 참여율은 최소 30% 이상(미참여월은 0%로 산정)

성 명			소속			직책					연령
학력	대학 전공					해당분야 근무경력
	대학원 전공					자격증
본 용역 참여임무					본 용역 참여기간				본 용역참여율 (평균)			%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발 주 처	참여율(%)	비고

【별지 제6호 서식】

정보  비공개  동의서

본인은 귀 원의 『KOREA 360 프로젝션 맵핑 공간 조성 위탁용역』와 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 원이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2023.     .     .

상 호(법인명)  :

주        소 :

대   표   자 :                       (인)

사업자등록번호 :

한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제7호 서식】

개인정보 수집･이용･제공 동의서
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’)의 “KOREA 360 프로젝션 맵핑 공간 조성 위탁용역”의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 “KOREA 360 프로젝션 맵핑 공간 조성 위탁용역” 입찰 참여에 따른 입찰서류(별지 제1호 서식 ~ 별지 제6호 서식) 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등 - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등 - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등 - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰 참가서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외 2023년 월 일 한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제8호 서식】

용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

(참여인력 중 소속 외(프리랜서 등) 인력의 경우 작성하여 제출)

○ 성 명
○ 연락처 (전화번호/이메일)
○ 과업 내 참여(담당) 업무
○ 참여 기간	※ 용역 계약기간 중 업무 수행을 위해 참여하는 기간 기입 ※ 시작일 ~ 종료일 형태로 기입
○ 수령 예정 보수(인건비)	※ 총액 또는 개월 당 보수로 기입 ※ 본 용역 예산 내에서 집행 예정인 금액 기준으로 기입

본인은 (용역 계약업체명)과의 정당한 계약 하에

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인합니다.

(참여 당사자)	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)

(용역 계약업체명)은 위의 사람이 해당 업무의 수행을 위하여

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인하며,

정당한 보수를 투명하게 지급할 것을 서약합니다.

(용역 계약업체명) 대표	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)