과 업 지 시 서

사 업 명	양방향 학습지원체계 관련 방송실 구축 설계 및 컨설팅
주관부서	교육운영팀

2023. 3.

구분	소속부서	직위	성명	전화번호 (e-mail)
책임자	교육운영팀	팀장	안성섭	055-792-0221 (ssahn@copyright.or.kr)
실무자	교육운영팀	차장	유현석	055-792-0222 (yoohs@copyright.or.kr)

목    차

Ⅰ. 설계개요

1. 과업명	1

2. 과업목적	1

3. 공사위치	1

4. 과업기간	1

5. 컨설팅 용역비	1

6. 위치 및 규모	1

7. 대상규모	2

8. 컨설팅 방향	2

9. 과업범위	3

10. 특기사항	3

11. 기타사항	4

Ⅱ. 일반사항

1. 주요 일반사항	5

2. 유의사항	5

3. 업무의 책임과 한계	6

4. 용역내용	9

5. 공간설계	10

6. 방송장비 설계	10

Ⅲ. 설계 및 컨설팅 보고서 작성 지침

1. 일반사항	11

2. 사전조사에 관한 사항	12

3. 기타사항	12

Ⅳ. 실시설계 작성지침

1. 방송장비 구성 및 연동	13

2. 통신선간	13

3. 설계기준	13

4. 세부계획	14

5. 검토사항	14

Ⅴ. 설계도서 작성기준

1. 설계도서 구성 지침	15

2. 설계도서 작성 지침	17

Ⅵ. 설계 지침

1. 공통분야	20

2. 설계 관련 법규	21

3. 설계 관련 규격 및 기준	22

4. 성능기준	23

Ⅶ. 분야별 지침

1. 건축분야	24

2. 방송장비분야	25

Ⅷ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항	27

2. 성과품의 작성	28

3. 성과품의 납품	34

Ⅰ. 설계개요

1. 과 업 명 : 양방향 학습지원체계 관련 방송실 구축 설계 및 컨설팅

2. 과업목적

가. 온라인 실시간 교육 방송환경 조성을 위한 설계 및 컨설팅

나. 촬영 영상물의 편집 관리가 가능한 시스템 구성 설계 및 컨설팅

다. 향후 안정적 방송실 운영 및 유지보수 방안 제안

3. 공사위치 : 경남 진주시 충무공동 15-2(한국저작권위원회 신축건물)

4. 과업기간 : 계약일로부터 60일간

5. 컨설팅 용역비 : 49,000,000원(부가세 포함)

6. 위치 및 규모

가. 위치 : 한국저작권위원회 저작권체험관 내의 방송실, 방송대기실(신축건물 2층)

나. 내역 : 영상 및 음향 방송시설 설치

다. 규모

1) 방  송  실 : 27.2855평(8.2mⅩ11m = 90.2㎡)

2) 방송대기실 : 16.3713평(8.2mⅩ6.6m = 54.12㎡)

라. 기타 방송시설에 관한 사항

마. 추정공사비 : 748,500,000원(부가세 포함)

1) 방송실 및 방송대기실 인테리어 공사 : 96,000,000원

2) 방송SW 구입 : 189,500,000원

3) 방송장비 구입 : 463,000,000원

7. 대상규모

구 분	내 용	물 량	비 고
방송실 및 방송대기실	o 방송실 구축 계획 컨설팅 보고서(설계 및 컨설팅 보고서) o 설계 설명서, 설계도면 o 방송실 구축 용역 제안요청서 o 유지관리 지침서 o 공사 시방서, 공사내역서	1식	인테리어 공사 설계 포함
방송장비	o 구매 대상 방송장비(H/W, S/W 등) 선정	1식	실시간 방송
구매장비	o 방송장비 비용 산출 - 수량산출서, 단가산출서, 일위대가 - 2개 비교 견적(조달구매시 구매번호 등)	1식	비용조사

8. 설계 및 컨설팅 방향

가. 설립 목적과 기능에 적합한 통신장비 분야 계획 및 배치할 것

※ 설계도서 작성시 해당 부분만 적용하여 설계 요망

나. 경제성을 고려한 효율적인 운영관리를 위한 방송장비 조사 및 방송장비 회로 구성할 것

다. 방송실 용도에 적합하도록 방송장비 배치 및 전기선로 등 수립할 것

라. 방송대기실의 사용목적 및 이용자의 편의성을 충분한 배려할 것

마. 공공기관 방송시스템 구축‧운영 관련 법규(규정) 준수할 것

바. 향후 유지보수 차원의 방송실 운영 방향성을 정립할 것

9. 과업범위

계약상대자는 본 과업을 수행하는 과정에서 단계별 과업을 수행하여야 한다.

가. 대상지 현황조사 및 기본구상

1) 공간의 용도별 운영(장비 등) 디자인 제시 및 공간 창출 계획 수립

2) 목적에 맞는 방송시스템(음향, 영상, 조명 등) 구축 계획 수립

3) 한국저작권위원회가 필요하다고 요구하는 사항

나. 설계안 작성 및 인･허가 협의 등 제반 업무 수행

다. 설계 설명서, 설계도면, 내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가, 공사시방서, 방송실 구축 용역 제안요청서 등 작성

라. 설계안에 대한 사용자와의 협의에 필요한 서류 작성

마. 관련법에서 정하는 인․허가에 대한 사항

바. 인테리어 투시도 작성

사. 향후 방송장비 도입 및 설치에 필요한 사항

1) 구매 대상 방송장비(HW, SW 등) 선정 사항

2) 추정공사비 내의 방송장비별 산출내역 및 소요비용 조사

아. 향후 방송실 운영 및 유지보수 방안 제안

10. 특기사항

가. 본 설계 및 컨설팅은 계획(안)을 계약 후 14일 이내에 제출하여야 하며, 계획 협의회 때 제시된 의견 및 건의사항 등 보완사항을 조정, 담당자의 협의를 거친 뒤 실시설계를 추진할 것

나. 설계 용역자의 자격

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령 제13조」의 규정에 따른 요건을 갖추고 아래의 조건을 모두 갖춘 자

1) 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 동법시행령 제33조 규정에 의한 엔지니어링 사업자(정보통신, 업종코드: 3572)

2) 기술사법 제6조 및 동법시행령 제2조, 제18조, 규정에 의한 기술사사무소(정보통신, 업종코드: 1320) 등록을 필한 업체

3) 건축사법 제4조 및 제23조에 의한 먼허를 소지하고 건축사사무소(업종코드: 4817)를 등록을 필한 업체

다. 공동계약(분담이행방식) 가능

1) 공동수급방식

공동수급체는 대표사 포함 5개사 이하로 구성하고, 구성원은 이행하는데 필요한 참가 자격을 갖추어야 하며, 분담이행방식(면허보완)만 가능

2) 공동수급체의 구성원으로 하여금 상호 협의하여 공동수급체 대표자를 선임하게 하되 출자비율, 분담내용의 비중이 가장 큰 업체를 우선적으로 선임하여야 한다.

라. 설계용역 납품일은 계약일부터 60일로 한다.

11. 기타사항

가. 배치 및 평면은 운영 목적에 적합한 규모로 계획하되 향후 확충에 대비한 구조 등에 대하여는 한국저작권위원회의 요구에 따라 계획을 수립하여야 한다.

나. 모든 구축 장비는 이용 목적에 맞게 구성되어야 하고 시스템의 확장성과 호환성, 유연성을 고려하여 운영의 효율을 기할 수 있도록 계획하여야 한다.

Ⅱ. 일반사항

1. 주요 일반사항

가. 용역수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 제시하야 한다.

나. 본 과업지침에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 한국저작권위원회와 협의하여야 한다.

다. 한국저작권위원회와 긴밀한 협조 체제를 유지하고, 참여 컨설턴트는 분야별 전문가로 구성하여야 한다.

라. 각종 계산 기준은 국내 기준을 적용하고, 국내 기준이 없을 시에는 외국 기준을 적용할 수 있으나, 한국저작권위원회와 협의하여야 한다.

2. 유의사항

가. 본 과업지시서 내용을 숙지하고“과업범위 및 추정공사비”의 범위 내로 하는 것을 원칙으로 한다.

나. 한국저작권위원회의 조건을 최대한 활용한 배치 및 주위와의 조화를 이루어야 한다.

다. 상호 동선의 연계 편리성을 확보해야 한다.

라. 설계내역서 작성 시 물량의 누락, 자재의 표기 모호, 단가 오적용 등으로 공사 계약자로부터 설계변경 요구 등 문제점 발생이 예상되므로 설계 내역서 작성에 신중을 기할 것

마. 과업범위의 내용 중 설계용역에 적용이 어려운 부분은 한국저작권위원회와 협의하여야 한다.

바. 오염 물질을 방출하는 자재(도장재, 접착제, 목재 등)를 지양하고, 친환경 건축자재로 설계하여야 한다.

사. 작성된 각종 설계도서는 상호 내용이 합치되어야 하고, 해석이 용이 하도록 작성되어야 한다(설계도면, 시방서, 각종 견적서 등).

아. 향후 유지관리에 필요한 내용을 설계 및 컨설팅 보고서에 포함시켜야 하며, 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리 방법을 제시하여야 한다.

자. 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 산정하여야 한다.

차. 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 견적서, 공사비 내역서, 한국저작권위원회가 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

카. 계약상대자는 공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 한국저작권위원회에 제시하여야 하며, 한국저작권위원회의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우는 계약상대자가 설계 도서를 수정하여야 한다.

3. 업무의 책임과 한계

가. 용역의 추진 절차

1) 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

2) 합리적인 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 한국저작권위원회가 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.

3) 계약상대자는 한국저작권위원회의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

4) 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대한 용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

5) 관련법규와 계약조건, 한국저작권위원회와 협의된 설계 조건을 만족하여야 한다.

6) 계약상대자는 설계 및 컨설팅 용역 중 관련 자료를 인용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대하여 즉시 한국저작권위원회에 알려야 한다.

7) 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계 컨설팅을 수행하는 동안  실제 상황 파악을 통한 실제 조건을 정확하게 표시하여 설계도에 반영하여야 한다.

8) 계약 당사자 간에 발생하는 분쟁은 협의를 통해 해결한다. 협의 중에도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

9) 계약상대자는 설계 추진과정에서 상호 긴밀히 협조하여 세부 설계 및 컨설팅 내용이 서로 달라지는 문제점을 예방하여야 한다.

10) 계약상대자는 용역 종료 후라도 공사 진행과정에서 설계하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 한국저작권위원회가 보완자료 및 변경도서를 요구하였을 경우 계약상대자는 자신의 비용으로 지체 없이 이를 이행하여야 한다

나. 보고

보고는 주간 및 월간 정해진 날짜에 한국저작권위원회와 협의 및 관련 서류를 제출하여야 하며, 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고, 적절한 대책을 수립하여야 한다.

1) 착수보고 : 계약일로부터 14일 이내(계획(안) 제출)

2) 중간보고 : 착수일로부터 30일 이내(필요시 PT보고)

3) 최종보고 : 착수일로부터 60일 이내(필요시 PT보고)

4) 착수계, 과업수행계획서, 책임기술자 선임계, 설계용역 참여기술자 현황, 설계용역 수행 조직표, 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 설계용역 예정공정표, 계약금액에 대한 산출내역서, 보안각서 각 1부 등

5) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

※ 보고 방식 등과 관련하여 발주기관과 상호 협의한 경우, 변경 가능

다. 인 · 허가 및 승인

1) 용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 사항에 대하여 업무 범위를 명확히 하고, 필요한 서류를 작성함과 동시에 관련 기관에 인․허가(협의)를 받을 수 있도록 하여야 한다.

2) 필요시 준공계 제출과 동시에 건축물관리대장 등재에 필요한 일체의 서류를 제출하여야 한다.

라. 보안

1) 업무 내용의 비공개

계약상대자는 한국저작권위원회와 업무수행 중 알게된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 한국저작권위원회의 승인 없이 공개할 수 없다.

2) 검토 및 협의 창구 단일화

한국저작권위원회와 계약상대자 간의 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 협의 창구는 단일화하여 보안 유지가 용이하도록 한다.

마. 설계도서 및 컨설팅보고서의 저작권

본 설계 및 컨설팅 용역물의 저작 재산권은 한국저작권위원회에 있다.

바. 과업변경

1) 업무 내용 변경은 한국저작권위원회와 계약당사자가 공문을 통해 상호 승인하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

2) 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 한국저작권위원회와 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

4. 용역내용

가. 자료 수집 및 준비

1) 정보수집 및 준비사항 상세조사

2) 사용 재료 및 방송장비 등에 관한 조사 및 확인

3) 특수 공법 부분의 상세 조사

4) 각종 법령 수속에 대한 협의

5) 일정표 조정

나. 검토·분석

1) 방송장비 등 배치 및 사용 방식의 결정

2) 배관․배선 등의 계통 및 경로의 설정

3) 각 부분 기능의 검토

4) 공간 표현의 검토(형태의 검토 및 사용 재료의 검토)

5) 공사비 및 시공기술 검토

6) 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토

7) 방송장비 및 인테리어 공사에 사용되는 재료의 검토

8) 관계법령 등의 적용

9) 방송실 운영 및 유지보수 방안 검토

다. 설계 사항

1) 방송장비 배치 등 공간 설계

2) 각 부분 사용재료 및 시방의 설정

3) 평면, 단면, 입면 및 상세설계

4) 공사비 계산과의 조정

5) 색채 계획의 수립

6) 각종 기기(방송장비 등)의 설계

7) 사용 재료, 사용기기(방송장비 등) 및 사양 결정

8) 수요자의 요구사항 결정

9) 각종 설계 등의 조정

5. 공간설계

가. 계획방향

한국저작권위원회 신축건물의 특징, 기획 의도를 검토하여 상호 조화로운 디자인이 되도록 종합적으로 계획한다.

1) 기존 사무공간(타 회의실 등)과 조화를 이룬 내부 공간 계획

2) 실시간 방송 및 편집 편의성을 고려한 공간 설계

3) 체험교육 방문자의 동선을 고려한 방송실 환경 구축

4) 공간별 다양성, 확장성을 고려한 가구 디자인 구축

나. 디자인 방향

1) 방송실

가) 한국저작권위원회의 상징성을 고려한 디자인

나) 메인 스튜디오 세트(데스크, 백월, 데코레이션 등 세트 전반)

다) 차음, 방음 등 스트디오 설계

라) 체험교육 방문 및 방송장비 이용 동선 중심의 이용환경 구축

마) 필요시 내부 인테리어 붙박이 가구 및 기구(FIX, Built-IN) 포함하여 작성

바) 필요시 전기조명 계획을 포함하여 작성

사) 사용자 편의성을 고려한 평명·입면 공간 구축

2) 방송대기실

가) 기존 사무공간(타 회의실 등)과 조화를 이룬 디자인

나) 편안함, 휴식이 있는 공간 구성(소품 및 가구)

다) 사용자 편의성을 고려한 평명·입면 공간 구축

6. 방송장비 설계

가. 계획의 방향

온라인 실시간 교육방송 환경 조성 및 방송에 따라 제작된 영상물의 편집 관리가 용이한 시스템으로 컨설팅 계획을 수립한다.

나. 주요 설계 분야

1) 실시간 스트리밍 형태의 양방향 또는 다방향 구조의 방송 설계

2) 실시간 스트리밍 방송 실황을 위한 제어 기능 설계

3) 비디오 및 오디오 콘텐츠 제작 및 편집 설계

4) 스튜디오 조명 설계

5) 주･보조 영상 촬영 및 음향 녹음, 송출 설계

6) 전기음향(스피커, 음향장비 등), 건축음향(인테리어 등) 오디오 제작 설계

7) 비디오/오디오 시설장비 대상 목록의 작성(상세사양 포함), 구입 상세계획, 배치계획도 상의 기기(방송장비)의 설계

Ⅲ. 설계 및 컨설팅 보고서 작성 지침

1. 일반사항

	< 일반사항 >
설계 및 컨설팅 과정은 계획단계, 설계단계(실시설계)에서부터 시공을 고려한 컨설팅이 되어야 하며 사전에 설계조건의 파악 및 자료조사 등을 통하여 방송실의 설계조건이나 성격을 정확히 파악한 후 설계 및 컨설팅에 착수하여야 함.

가. 비용의 비교분석을 통하여 구조 및 자료계획을 구체적으로 경제적인 설계가 되도록 한다.

나. 공사완성 후 경제적이고 효율적인 유지관리를 위하여 실시설계 계획 단계에서부터 유지관리측면을 검토 및 조사되어야 하며 실시 설계시 유지관리에 관한 사항을 반영한다.

다. 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해독이 용이하도록 작성되어야 한다.

2. 사전조사에 관한 사항

계약상대자는 최종 설계도서 납품 전에 분야별 설계 참여기술자가 현장을 방문 재확인하여 기존 조사 현황과 일치 여부를 확인할 것

가. 서울사무소에서 운영중인 방송장비 구성 및 사용 여부 확인

나. 서울사무소 방송실과 진주 본원의 방송실 및 방송대기실 공간 확인

3. 기타사항

가. 제출된 설계도서에 대한 공사 시공 및 준공 후 설계구조의 불완전으로 발생하는 하자와 설계 후 공사 물량의 착오로 인한 손해 발생 시 설계자로서 의무와 필요한 조치를 이행하고 발생되는 형․민사상의 책임을 진다.

나. 설계내역서 작성시 정부표준품셈을 적용하고 각종 자재단가 적용은 조달청에서 고시한 도매가격을 원칙으로 적용한다.

(단 제시되지 않은 품목의 단가는 일반건설 물가지 또는 2개회사 이상의 견적서 등을 비교하여 최저가격을 적용)

다. 각 공정별 적용노임은 대한건설협회에서 공포한 공사부분 상(하)반기 시중노임단가를 적용하고 총 공사비는 예산 범위 내에서 가능하도록 협의한다.

라. 설계내역서 작성시 제잡비율을 제시한 자료를 적용하여 작성한다.

마. 실시설계 계획 검토서의 심사를 필한 다음 실시설계를 하여야 하며 협의사항에 대하여서는 즉시 수정․보완하여 적용한다.

바. 용역계약 후 착수계 제출시 설계용역 참여기술자 명단을 구체적으로 작성한다.

사. 설계 및 컨설팅 추진에 있어 필요한 따른 보안각서를 제출한다.

Ⅳ. 실시설계 작성지침

1. 방송장비 구성 및 시스템 연동

가. 방송실 내부 방송장비 구성할 것

나. 방송장비 시스템 가동 및 설치 계획 수립할 것

다. 각 실 영상 및 음향 가동 계획 수립할 것

2. 통신간선

가. 영상 케이블 각 실 연동 계획 수립할 것

나. 음향 케이블 각 실 연동 계획 수립할 것

다. 증축 목적에 대비한 전송능력 이상의 통신케이블 계획 수립할 것

라. 방송실 케이블이 집중되는 지점을 배관방식으로 계획 수립할 것

마. 케이블이 집중되는 장소 및 단자함에 배선정리 등 간결하게 배치할 수 있는 방법을 검토하여 도면에 표기할 것

3. 설계기준

가. 기능 배분계획

쾌적한 공간을 조성하고 각종 실시간 방송 및 녹화․편집 관련 방송장비(4K Ultra HD 방송시스템)을 구현하여 관리의 편의성, 경제성을 감안한 합리적이고 효율적인 방송시설로 계획 수립할 것

나. 배치계획

1) 방송실 내부 방송장비 위치 및 시설에 대한 계획 수립할 것

2) 방송실 내부 전관방송설비(실시간 방송 중심) 시설 계획 수립할 것

3) 4K Ultra HD 영상 및 일반 음향 시스템 시설 계획 수립할 것

4) 사용 용도에 따른 약전설비의 용도별 회로구성 계획 수립할 것

다. 기존 시설 고려

1) 한국저작권위원회 소방시설의 보존 유지 및 정상적 기능 작동을 고려하여 계획을 수립할 것

2) 기존 전력시설을 최대한 활용한 방송장비 전력 계획 수립할 것

3) 별도 보안․시건 장치 설계시 기존 보안․시건 장치와 연계 가능한 계획 수립할 것

4. 세부계획

가. 단순, 반복적인 설계는 지양할 것

나. UHD 영상 및 음향 시스템 설계 및 계획 수립할 것

다. 사용자의 용도에 적합한 방송실 규모 및 장비 구성 계획 수립할 것

라. 세부사항

1) 방송실에 영상기기 등을 설치하는 설비로서 방송실에 온라인 실시간 교육 및 기타 방송 시 영상 혹은 음원을 검출하고 재생하여, 유튜브 등을 통해 스트리밍 서비스를 할 수 있어야 함

2) PC로 녹화가 가능해야 하며, 추가로 인터넷 방송을 각과 TV로 송출 할 수 있는 기능을 탑재하는 계획 수립할 것

5. 검토사항

가. 실시계획에 따른 각종 설계자료 조사 및 문제점 협의할 것

1) 통신분야 실시설계 계획 범위를 검토할 것

가) 해당 법령 및 규정 검토할 것

나) 방송실 내의 적용할 방송장비를 검토할 것

다) 배선방식 결선 및 연동을 검토할 것

라) 기타 통신에 필요한 사항을 검토할 것

나. 본 설계 및 컨설팅은 기 확정된 계획안을 토대로 규모 및 예산을 대비하여 한국저작권위원회와 협의･조정된 범위로 설계 컨설팅을 추진할 것

다. 계약상대자는 설계 및 컨설팅 계획을 14일 이내에 수립하여 공문으로 한국저작권위원회에 제출할 것

라. 실시설계 계획 검토서 제출 당일 담당자(감독자) 입회하에 설명할 것

※ 설명은 설계 및 컨설팅 용역업체 담당과 일정 협의 결정

Ⅴ. 설계도서 작성기준

1. 설계도서 구성 지침

가. 사용전압 구성

1) 신축건물 전기선로인 저압삼상4선식 220V/380V로 설계

2) 단상전동기의 전력공급 참고사항

가) 전등변압기에서 공급가능한 단상전동기의 용량한도는 다음의 기준에 따른다. 전동기를 2개 이상 동시 기동할 수 있는 경우에는 그 출력합계를 기준으로 한다.

(단위 : 마력)

기동형별, 전압별	분상	반발	콘덴서
220V	1	1½	1

나) 기타 사용전압 구성은 한국전력공사(KEPCO) 전기공급 약관 준용

3) 상시전원 필요시 신축건물 전원 확인 후 설계

나. 방송실 구성

1) 적정한 배치 운영과 안전성 및 신뢰성을 고려한 방송실 구성

2) 방송장비의 적정한 보호방식 채택

3) 실시간 방송이 가능한 방음, 방진 인테리어 공사 설계

4) 바닥공사의 경우 악세스플로어를 염두한 계획 수립

다. 방송장비 구성

1) 디지털 방식의 방송장비 도입 계획 수립

2) 4K Ultra HD급 이상으로 설계 계획을 수립하되, 일부 방송장비의 경우 예산의 적정성을 검토하여 고효율 장비의 활용 및 Full HD급으로 설계 계획 수립

라. 배선개통 및 무선통신

1) 배선선로 계통은 광케이블과 일반케이블 방식으로 계획

2) 무선통신의 경우 IP Network과 블루투스 5.0 이상으로 계획

마. 배관 및 배선

1) 배관

가) 천장 및 벽면 노출 : 내충격비닐전선관, 강제전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 케이블덕트

※ 천장의 경우 소방안전을 위해 방화장비를 이동·회손하지 말아야함

나) 악세스플로어 : PE전선관, 파상형비닐전선관

2) 배선

가) 인입 : 통신기반시설 사업체 인입을 위한 배관 계획

나) 간선 : 광 및 LAN UTP CABLE 이상

다) 접지 : GV(F-GV) CABLE 이상

라) 분기 및 기타

1) 비상 및 자체 방송 : HFIX 이상 절연전선

2) 유선방송 : 동축케이블 차폐형 이상

3) 구내통신 : UTP CAT6

4) 구내 인터넷 : UTP CAT6

바. 접지방식

1) 약전설비에 사용하는 모든 기계기구, 전기기계 기구 등의 사고시 문제가 될 수 있는 모든 도체, 어스설비, 저압회로의 중성점은 반드시 전기설비기술기준령 제21조 및 동법 제24조와 내선규정에서 정한바에 따라 접지 계획을 수립할 것

2) 접지공사의 종류 : 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종

3) 역섬락방지장치 설치 설계반영

2. 설계도서 작성 지침

가. 설계도서의 작성순서

1) 표지 및 목차

2) 내역서

가) 공사내역서

나) 관급내역서

다) 관청 수수료 내역서

3) 일위대가 및 적용 단가조사표

4) 통신회선 선번장표(방송선번장 포함)

5) 산출기초

6) 예정공정표

7) 설계 설명서

8) 특별 설명서

9) 설계도면

10) 사전조사내용

가) 사진

나) 기타 기초자료

11) 기타 설계에 필요한 자료

나. 공사설명서 작성

1) 공사의 목적 및 개요

2) 공사 기간의 산정

3) 시공에 있어서 기본사항과 공사에 필요한 성능 및 기준

4) 공사 목적물의 설치 장소 및 위치

5) 공정 및 시공 방법

6) 산업폐기물의 처리 방법

7) 기타 지정을 요하는 사항

8) 특정제품의 모델 및 상세는 도면에 표기 할 수 없으며 도면 및 설명서에 기준 사양을 작성하고‘동등급 이상’이라 표시

다. 설계도면의 작성

1) 축척 : 설계도면의 경우 A1, A3, A6 기준으로 작성

가) 범례도 : 임의

나) 간선 및 분기 개통도 : 임의

다) 약전설비 각 개통도 : 임의

라) 방송실 장비 설치도 : 1/50 ～ 1/10(임의)

마) 평면도 : 1/50 ～ 1/10(임의)

바) 약전종합 단자반 설치도 : 임의

사) 각종 상세도 : 임의 ～ 1/50

아) 도면 작성시 시공가능 여부를 정확히 판단하여 작성

라. 내역서 작성

1) 내역서 작성에 필요한 산출조서 수량 및 공임은 전기 표준품셈에 의하여 작성

2) 표준품셈에 명시되지 않는 품으로 타부분(전기, 토목, 건축, 기계 등)의 표준품센에 명시된 품은 그 부분의 품을 적용

3) 타 부분과 유사한 공종의 품은 본 전기 표준품셈을 우선 적용

마. 작도 용지 : 작도 용지는 영구보관에 지장이 없도록 품질이 양호한 트레이싱 용지를 사용한다.

바. 도면 규격과 양식 : 도면 원도의 크기는 105㎝×148㎝로 사용

사. 설계도면에 기입되는 단위는 미터법으로 하고 단위 ㎜로 표시

아. 문자표기 요령 : 표기문자는 한글사용을 원칙으로 하고 한글만으로 이해가 어려운 경우에는 영문 및 한문으로 명기한다.(다만, 배치도, 평면도, 입면도, 주요 단면도 및 실내 마감표는 한글, 영문을 병용 기입하여 표기 숫자는 일체 아라비아 숫자 사용)

자. 도면번호 표시 : 전기 일반도 : E-001부터 시작

차. 도면작성시 일반요령

1) 도면작성은 원칙적으로 CAD를 사용하며 색채는 통일하며, 출력 두께는 가장 가늘게 출력

2) 도면을 수정할 때에는 완전히 지워 작도하고 청사진 제작시 2중으로 복사되지 않도록 한다.

3) 각 공사별로 도면목록을 작성, 방향표시 상세표시 KEY PLAN 및 보기를 넣어 해당 부분을 찾을 수 있도록 하고 작성

4) 모든 도면상세도는 가능한 건축도면 위에 표기

카. 도면작성시 특기사항

1) 평면도의 각실에 실명직접 기입한다.

2) 주요한 부분은 부분평면상세도(축척1:50,NO)를 작성한다.

3) 설계도서 작성 관련 전기법규 및 관계 해당 법을 준수하여야 한다.

Ⅵ. 설계 지침

1. 공통분야

본 과업내용서는 설계상의 제반 조건을 규정한 것으로, 설계 진행의 일관성을 유지하고 원활한 시공을 도모하기 위한 지침을 정함에 그 목적이 있다.

가. 본 과업내용서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 누락 및 오기된 경우는 한국저작권위원회와 협의하여 처리하되, 의견이 불일치될 경우 과업지시서와 관련 규정상 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

나. 인테리어, 방송장비 등 부대설비에 관한 설계기준은 관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 과업내용서에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

다. 본 과업지시서에 제시한 사안은 최소한의 기준으로 설치 및 시공된 후에 동등 이상의 성능을 확보할 수 있도록 컨설팅을 해야 한다.

라. 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

1) 본 컨설팅에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.

2) 국내 우수 중소기업 제품을 우선 선정하되, 성능 및 시장지배력, 에프터서비스, 유지보수 차원 등을 고려하여 외국산 제품을 제안할 수 있으며, 한국저작권위원회와 협의하여야 정한다.

3) 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안 된다.

4) 산업통상자원부고시 제2021-166호(2021. 10. 25.) : 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」의거 인증된 고효율 제품을 우선 사용을 검토한다.

5) 과업대상 관련법 및 규정에 적합하게 계획되어야 한다.

6) 본 지침에 명시되지 아니한 사항은 한국저작권위원회와 협의하여 처리하여야 한다.

2. 설계 관련 법규

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신의 공사시방서 및 기준에 의거 설계를 수행하여야 하며, 준수하여야 할 관련 공사시방서, 기준 및 법규 중 주요한 것은 다음과 같다.

가. 관련법률

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

2) 건축법

3) 건설산업기본법

4) 환경정책기본법

5) 산업안전보건법

6) 에너지이용 합리화법

7) 전기사업법 및 전기 공작물 규정

8) 보안 관계 법률 및 규정

9) 전파법 및 동 시행령

10) 전기통신사업법 및 정보통신공사업법

11) 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치 및 관리에 관한 법률

12) 전기공사업법, 전력기술관리법

13) 정보통신공사업법

14) 중소기업진흥 및 녹색제품 구매촉진에 관한 법률

15) 실내공기질 관리법

16) 신에너지 및 재생에너지 개발이용 보급 촉진법

17) 기타 관련법령

나. 관련 지침

1) 건설공사 표준시방서

2) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

3) 건설 공사 안전관리 업무수행 지침

4) 건축기계설비공사 표준시방서

5) 내선규정

6) 내진설계 시공지침서

7) IEC규격 전기설비 설계

8) 기타 지침

3. 설계 관련 규격 및 기준

가. 한국공업규격(K․S)

나. 한국산업규격(KS)

다. 건축구조기준

라. 건축물의 에너지절약 설계기준

마. 건축전기설비 설계기준

바. 녹색건축인증기준

사. 구조물기초설계기준

아. 정부표준품셈

자. 기타 설계 적용 규격 및 기준

4. 성능기준

본 사업의 설계는 다음의 성능 이상이 확보되어야 한다.

가. 내구성능

1) 인테리어 설계 시 내구연한은 최소 5년 이상으로 한다.

2) 부식성자재는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되 부득이 사용해야 할 경우에는 방청처리를 통해 최대한 부식되지 않도록 설계하여야 한다.

3) 자재 등은 부위별 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하도록 설계하여야 한다.

4) 구조물과 연결되는 각종 설비의 연결은 부동침하 등에 대비하여 Flexible Joint 등을 계획한 설계가 되도록 한다.

5) 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계 및 컨설팅이 되어야 한다.

나. 방․내화 안전성능

1) 소방관련법에서 요구하는 기준을 고려하여 설계 및 컨설팅을하여야 한다.

2) 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 발주청에서 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능을 고려하여 설계하여야 한다.

다. 편리성

1) 각 실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치, 구성하여 설계하여야 한다.

2) 각종 설비는 사용하는데 편리도록 설계 및 컨설팅이 되어야 한다.

라. 유지관리

1) 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 설계 및 컨설팅이 되어야 한다.

2) 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게 구입할 수 있는 것으로 제안하여야 한다.

Ⅶ. 분야별 지침

1. 건축분야

가. 설계 기본방향

1) 업무를 효율적으로 수행하기 위한 공간 환경과 조화된 배치계획, 내부 공간의 특성, 기능, 편의성을 고려한 평면계획 및 입면계획을 수립하여 종합적으로 계획한다.

2) 인테리어 디자인에 대한 산출물은 안을 도출하고 발주기관과 협의하여 성과품을 결정한다.

3) 한국저작권위원회에 적용된 건축물에너지 효율등급, 녹색건축 등 각종 인증등급 및 인허가 사항을 고려하여 설계한다.

4) 실내공간의 제품 선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리, 색채 개념 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 하며, 최신 기자재를 반영하여 설계한다.

5) 인테리어는 종류, 형태, 재료, 색채, 크기, 필요위치, 필요수량 등을 면밀하게 검토하여 설계에 반영한다.

6) 주요 마감재는 한국저작권위원회의 승인을 득하여 설계에 반영토록 하고, 내구성, 불연성 자재를 고려하여 자재 선정한다.

7) 가능한 최신 기술을 반영하고, 유지보수 용이성을 고려한다.

8) 한국저작권위원회의 특성을 표현할 수 있도록 표준화, 모듈화된 디자인을 사용하여, 인테리어 계획을 통해 전체에 통일성을 줄 수 있도록 계획한다.

나. 세부사항

1) 방송실

가) 영상촬영용 공간, 크로마키 촬영 공간으로 구성

나) 부드럽고 따뜻한 분위기의 공간으로 조성하여 다양한 촬영이 가능하도록 공간을 구성

다) 장애인, 어린이, 노약자 등 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 디자인 적용한 설계

라) 방송실 세트(백월, 테코레이션 등) 시인성을 고려한 디자인 설계

마) 촬영 시 미적 아름다움과 사용하기 용이한 데스크 제작 설계

바) 대형 LED 디스플레이 구성 시 주변 환경과 조화로운 인테리어 마감 구성 설계

사) 방송실에 필요한 가구 및 기타 소품 제작

아) 다양한 콘텐츠를 제작과 사무를 하는 공간으로 가구와 복사기, 사무기기 등 배치를 고려하여 계획한다.

2) 방송대기실

가) 한국저작권위원회 회의실 등과 동일 또는 유사한 인테리어를 적용하여 통일성을 부여한 설계를 한다.

나) 바닥은 전기설비 및 통신설비의 배선 및 보수가 용이한 바닥구조와 정전기에 대응할 수 있는 자재(접지)로 계획한다.

다) 사용자 편의성을 고려한 평명·입면 공간으로 계획한다.

라) 촬영 전 분장과 휴식에 필요한 공간으로 기타 소품 및 가구를 고려하여 계획한다.

마) 사용자 편의성을 고려한 평명·입면 공간으로 계획한다.

바) 화상회의실 기능을 겸할 수 있도록 계획한다.

사) 배선 등 보수가 용이한 바닥구조로 계획한다.

2. 방송장비분야

가. 설계 기본방향

1) 다양한 교육영상 콘텐츠 제작을 고려하여 종합적으로 계획한다.

2) 방송장비는 사용 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성 있는 장비로 계획하며 에너지 절약 기자재를 고려한다.

3) 시스템의 확장성과 호환성, 유연성을 고려하여 개방형 구조를 지향하고 국내외의 표준 규격을 준수하는 계획이 되어야 한다.

4) 관리 인력을 고려하여, 시스템의 효율성 및 관리의 편리성을 고려한다.

5) 각종 장비와 시스템은 안정성, 확장성, 운영 편의성을 고려한다.

6) 주요 시스템에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 에너지절약 설계기준 등을 고려하여 경제성을 검토하고 설계에 반영한다.

7) 본 과업 완료 후에라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요할 때에는 이를 보완하여 제출하여야 한다.

나. 세부사항

1) 방송실(스튜디오)

가) 카메라 시스템은 추후 확장성(카메라 3대이상)에 대비하며, 고화질의 다양한 영상촬영이 가능한 카메라 시스템 선정

나) 스튜디오 영상촬영에 있어 충분한 이동을 이룰 수 있도록 연결케이블에 여유를 두며, 카메라의 위치, 조명 시스템은 최적의 영상촬영이 될 수 있도록 설계

다) 조명시스템은 LED조명으로 구성하고 피사체의 그림자 및 인물의 날림 현상이 없도록 조명장치를 고려하여 설계

라) 스튜디오 촬영(대담, 포럼) 및 대형 LED 디스플레이 시스템 촬영에 적합한 조명 시스템을 설계

마) 각 시설장비 시스템은 상호간에 유기적으로 연동하여 활용할 수 있도록 하며, 상황에 따라 이동이 가능할 수 있는 시스템으로 설계

바) 조정실간의 신호 연결이 가능하도록 PC, 카메라, 오디오, 마이크, 인터컴 등 각종 신호 단자들을 여유 있게 설계

아) 고품질의 대형 LED 디스플레이 구축을 통한 다양한 배경화면이 실시간으로 제공이 가능하도록 구성

자) 다양한 활용 가능한 크로마키 시스템 설계

차) 설치 장소와 용량에 맞는 스피커 시스템 설계

2) 방송실(조정실)

가) 비디오 스위처는 라이브스위칭, 멀티뷰어 등 다양한 기능을 하도록 시스템 구성

나) 콘솔 데스크는 운영자의 동선에 방해되지 않게 구성하며, 유지보수가 가능하도록 벽과 일정한 거리로 이격하여 구성

다) 본 공간의 활용성을 고려하여 안정적인 시스템으로 설계

라) 송출 시스템에서 발생하는 모든 이상 유무에 대해 모니터링이 가능하도록 시스템 설계

마) 도입에 필요한 화상회의 솔루션 및 유튜브, 페이스북 등 SNS 플랫폼으로도 실시간 스트리밍 서비스 할 수 있도록 설계

Ⅷ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 설계도서 작성기준

1) 설계도서 작성기준은「건축물의 설계도서 작성기준(국토교통 부고시 제2016-1025호, 2016.12.30.)」적용하고, 건축사법에의한 설계는「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시 제2020-635호, 2020. 9. 14.)」에 의거 작성하여 성과품을 제출한다.

2) 설계도서의 작성은「기본설계 등에 관한세부시행기준(국토교통부고시 제2013-93호, 2013. 4. 15.)」에 의거 전자화된 형태로 작성하되 “건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정”제66조에 따라 단체 표준으로 공고된 “건설 CALS/EC 전자도면 작성 표준”에 따른다.

3) 설계도서는 KS A0005제도 총칙에 준하여 작성한다.

4) 계약상대자는 모든 설계도서의 성과품 인쇄 및 제본은 한국저작권위원회와 협의 후 실시한다.

2. 성과품의 작성

가. 설계 및 컨설팅 보고서

1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단을 수록한다.

2) 한국저작권위원회의 지시사항, 검토사항 등 설계 반영 내용을 보고 한다.

3) 기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 한국저작권위원회와 사전협의 후 설계 및 컨설팅 보고서를 작성하여야 한다.

나. 설계 설명서

1) 공통분야

공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

2) 건축분야

기본계획, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용 재료 결정, 평면 입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 동선계획, 에너지절약 건축계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비 등을 설명한다.

3) 방송장비 분야

기본계획, 배치계획, 법규 검토, 친환경 설계내용, 장비들간 호환·운영 등에 대한 적합성, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등을 설명한다.

다. 각종 견적서(물량산출서)

1) 수량산출은 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

2) 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출하여야 한다.

라. 설계도면

1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

4) 설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

6) 모든 도면은 CAD로 작성하고 전자저장매체(USB 등 충분한 용량확보)에 담아 제출한다.

7) 설계단계별 설계 도서내용(공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 참조)

마. 유지관리지침서 등 작성

1) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성하여야  한다.

2) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

3) 유지관리지침서에 대한 대상, 작성방법 등 필요사항을 시방서 등 설계도서 및 보고서에 적절하게 제안하여야 한다.

바. 공사시방서

1) 공사시방서는 국토교통부 표준시방서를 기준으로 작성하여야 한다. 공사시방서를 작성할 경우는 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 당해 공사조건에 적합하게 시방서 내용을 수정․보완 또는 선택하여 시방서를 작성한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

가) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

나) 해당 공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

라) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

마) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등 관한 방법, 시기, 절차 등에 관한 세부사항

사) 한국저작권위원회와 향후 선정될 시공사 간의 책임범위

아) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

자) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

차) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

카) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

타) 기타 주요공사 사항

3) 공사시방서 작성 시 유의사항

가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

나) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

다) 표준양식을 사용하고, 작성 형식의 일관성을 유지하도록 한다.

라) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

마) 공종 전반을 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

바) 사용자재는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.

사. 공사내역서

1) 인테리어 공사내역서 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 기준으로 하되 한국저작권위원회와 협의하여 적용하여야 하며 내역서 파일은 한국저작권위원회가 요구하는 파일 또는 계약 의뢰 가능한 파일로 제출하여야 한다.

2) 인테리어 공사내역서 상의 공사비 내역은 국토교통부‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 우선 적용 하고□건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준□에 의하여 산출하되, 아래기준을 참고하여 산출한다.

가) 재료비

(1) 조사하여 통보한 가격으로 한다.

(2) 미 수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다.

나) 직접노무비: 대한건설협회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

다) 방송장비 및 자재는 한국저작권위원회가 직접구매(관급)토록 설계자는 관련사항을 설계도서에 표기하여야 한다.(관련: 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법제12조)

라) 방송장비 및 인테리어 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 한국저작권위원회와 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매)를 할 수 없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 설계개요서, 설계설명서, 공사시방서, 설계내역서에 표기하여야 한다.(관련: 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률시행령 제11조,)

3) 필요시 공사비에는 지장물 이설비, 에너지 인입 공사비 및 정밀안전진단비, 시운전비, 실내 공기질 측정비, 기타시험비, 친환경인증비, 폐기물처리비(100톤이상 시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

7) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

9) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

10) 수량 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

나) 국가재정법 및 동법 시행령

라) 기타 관련법규 및 기준

11) 설계내역서에 업종별 집계표 작성 : 「건설산업기본법 시행령」[별표1]의 「건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용」의 업종별 집계표를 참고하여 작성하여야 한다.

아. 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고, 별도로 A3규격으로 축소하여 작성한다.

자. 제안요청서

한국저작권위원회가 발주 예정인‘양방향 학습지원시스템 구축’ 요구사항을 체계적으로 작성한다.

차. 설계도서 검토

제품의 납품과 관련하여서는 설계 종합보고서, 설계 설명서, 설계도면, 유지관리 지침서, 공사시방서 및 공사내역서 포함한다.

1) 검토 방법

가) 설계시행 책임기술자가 검토

나) 먼저 각종 견적서 확인 검토

다) 확인된 견적서와 도면 일치여부 검토

2) 제출도면 : 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도면을 제출한다.

카. 기타

1) 설계용역 책임 및 하자

가) 용역업체(기술사)는 일체의 제출도서에 대하여 책임을 져야하며 시공도중 설계도서가 부합되지 않을 경우 현지조사 및 시험 등의 요구에 의하여 시행하여야 하며 이때의 비용은 설계자가 부담하여야 한다.

나) 검수 후 설계상의 중요한 결함사항 또는 변경사항은 반드시 수정요구에 응하여야 한다.

다) 공사 시공 중 설계상에 중대하고 명백한 결함 및 하자 발생 시에는 관련법은 물론 모든 민․형사상의 책임을 진다.

2) 설계도서 날인

설계도서는 각 기능별 분야별로 작성되어야 하며 규정된 자격 구비자로 하여금 작도 할 것이며 반드시 도면마다 날인하여 제출한다.

3) 납품 및 검수

가) 최종 설계도서는 검수관이 충분히 검수 할 수 있도록 계약 납품일 전에 제출하여 검사를 받은 다음 수정 또는 변경사항이 있을 때는 즉시 수정․보안

나) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

다) 모든 보고서, 견적서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다.

라) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하여 작성한다.

3. 성과품의 납품

가. 성과품 납품시기

1) 설계 최종납품: 착수일로부터 60일 이내

2) 최종성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

가) 용역자는 별도 납품요구가 있을 시 해당 목록에 대해 납품하여야 한다.

나) 성과품의 종류 및 납품부수(해당없는 경우 부분적으로 제외할 수 있음)

나. 설계 및 컨설팅 성과품 제출

종류	규격	부수	비고
설계 및 컨설팅 보고서	A4	3
설계설명서	A4	3
공간별 설계안	A3	3
방송장비 시스템 구성도	A3	3
가구 및 집기 배치도 및 상세도	A3	3
조감도·투시도(3D 이미지)	A3	3	3개 이미지 이상
설계도면	A3	3	CAD파일 포함
내역서(공내역서 및 실내역서)	A4	각 3
수량산출서(공간별 마감재 포함)	A4	3
일위대가표	A4	3
단가산출서	A4	3	견적서 포함
비교 견적서(2개 업체)	A4	각 1
시방서(표준시방서, 특기시방서, 자재지방서)	A4	3
공사예정공정표(CPM/PERT)	A3	3
USB메모리 (공종별 도면, 내역서, 시방서, 3D 공간 이미지 등)	-	3	각종별 통합

※ 상기수량은 각 해당별 각종심사 및 허가에 필요한 제출 부수는 제외된 수량으로, 요구시 수량에 관계없이 제출(협의 하에 수량 변경 가능)

4. 참여제한 고지사항

※ 한국저작권위원회 계약사무처리규칙에 의거 아래와 같은 제한에 저촉되는 업체는 참여를 제한하오니 반드시 주의하시기 바랍니다.

제32조의4(수의계약의 제한)① 제32조에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

1. 위원회의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 상법 제401조의2 제1항 각호에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다. 이하 “임원”이라고 한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

2. 위원회의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결 하려는 경우

3. 위원회의 퇴직자 모임·단체 또는 그 퇴직자 모임·단체의 회원사나 자회사와 계약을 체결하려는 경우

② 계약책임자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 계약상대자인 법인으로부터 임원의 명단이 기재된 문서 혹은 별지 12호 서식을 제출받아 동조 제1항제1호부터 제3호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 이 경우 계약담당자는 해당 법인에 허위서류를 제출할 경우 계약 해제·해지할 수 있고, 제46조에 따른 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다.

<본조신설 2023.03.10.>

제46조(부정당업자의 입찰참가 제한) ① 계약책임자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약상대자 또는 입찰자(계약상대자 또는 입찰자의 대리인·지배인 기타 사용인을  포함한다)를 발견한 경우에는 지체 없이 위원장에게 보고하여야 한다.<개정 2014.04.23>

1. 계약을 이행함에 있어서 조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자

2. 각종 법령의 하도급 제한규정을 위반한 자 및 발주관서의 승인없이 하도급을 하거나 발주관서의 승인을 얻은 하도급 조건을 변경한 자

3. 법령의 규정에 위반하여 공정거래위원회 등 관계행정기관으로부터 입찰참가자격제한 요청이 있는 자

4. 조사설계용역계약 또는 원가계산용역계약에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 해당 사업비를 적정하게 산정하지 아니한 자

5. 계약이행에 있어서 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자 또는 해당 법령에 보장된 안전·보건조치를 소홀히 하여 근로자에게 사망 등 중대한 위해를 가한 자

6. 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자

7. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자

8. 입찰 및 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자

9. 고의로 무효의 입찰을 한 자

10. 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계 직원에게 뇌물을 준 자

11. 입찰참가신청서를 제출하고도 회계연도 중 3회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자

12. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

13. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자

14. 정당한 이유없이 계약이행 능력의 심사 또는 입찰금액의 적정성심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니하거나 서류 제출후 낙찰자 결정전에 심사를 포기한 자

② 위원장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 시행규칙 별표 2의 세부기준에 따라 1월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격을 제한할 수 있다.<개정 2011.12.15, 2014.04.23>

③ 공동계약의 경우에는 입찰참가자격의 제한사유를 야기 시킨 자에 대하여 제1항과 제2항을 적용한다.<개정 2011.12.15>

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 부정당업자의 입찰참가 제한이 필요한 경우 요구부서장은 계약책임자 등에게 근거서류를 첨부하여 의뢰하여야 한다.<개정 2011.12.15>

⑤ 계약책임자등은 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다. 다만, 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자 외에는 적합한 시공자, 제조자가 존재하지 아니하는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.<신설 2014.04.23>