<붙임2>

경주 고선사지 삼층석탑

정밀안전진단(2차) 용역 과업지시서

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명

경주 고선사지 삼층석탑 정밀안전진단(2차) 용역

2. 과업 배경 및 목적

1) 경주 고선사지 삼층석탑은 1975년 국립경주박물관으로 이전하였으며, 이건 시 보수 등을 수행하면서 발굴 당시 원형과 다소 차이가 존재함. 특히 시멘트 등의 보수재료가 다수 사용된 것으로 확인되며, 문화재의 가치보존을 위해 원형고증을 통한 보수재료 제거 및 복원 등이 필요하다는 의견이 제기됨.

2) 본 정밀안전진단은 경주 고선사지 삼층석탑에 대한 원형고증 등을 수행하고 더불어 현재 상태에 대한 조사·분석을 수행함으로써 이를 근거로 구조물에 내재되어 있던 기능장애나 이상 변형의 원인을 규명함.

3) 대상구조물의 안전성과 사용성을 확보할 수 있도록 근본적인 대책안을 수립하고 원형고증 및 훼손 원인 등을 파악하여 문화재의 장기적인 보존관리계획 수립을 위한 방안을 제시하는 데 목적이 있음.

3. 과업개요

1) 사 업 명 : 경주 고선사지 삼층석탑 정밀안전진단

2) 사업위치 : 경북 경주시 일정로 186, 국립경주박물관 내

3) 사업기간 : 계약일로부터 120일

4) 사업내용 :

○ 사전조사(자료수집 등) 및 현황기록

○ 하중조사

○ 성능저하부 조사

○ 내시경 조사

○ 석재 성분분석

○ 변위·변형 조사

○ 초음파 탐상을 통한 압축강도 조사

○ 비파괴 지반조사(지구물리탐사)

○ 구조 안전성 검토

○ 구조물의 상태평가

○ 종합 정비 계획 수립과 연계되는 보존관리 방안 제시

4. 과업수행기간

1) 과업기간 : 계약일로부터120일

2) 착수보고 : 계약일로부터 7일 이내

3) 자문회의 : 계약일로부터 2개월 이내

4) 월간보고 : 계약일로부터 30일 기준

○ 추진내용 및 공정현황, 과업수행 중요 문제점, 처리결과 다음달 과업 수행 계획 등

4) 최종보고 : 완료예정일 10일 이내

5) 기타보고 : 기타 발주처에서 필요하다고 인정할 때

6) 책임연구원 제한 및 연구진 구성

○ 책임연구원은 석조문화재 구조 관련 박사학위를 수행한 자로 국내·외 석조문화재 관련 논문 10편 이상 게재 및 최근 5년 이내 국가 및 시·도 지정문화재 중 건축문화재 관련 정밀안전진단 및 안전점검 용역 5건 이상의 연구책임자 경험이 있는자로 하여야 한다.

○ 연구원 이하는 안전진단과 복원 연구가 가능한 자로 구성하여야 한다.

Ⅱ. 과업 세부내용

1. 사전조사(자료수집) 및 현황기록

1) 과업수행에 필요한 기초 자료를 수집하고, 이를 심층 분석하여 기본계획안을 수립한다.

○ 고선사지 연혁 검토

○ 발굴조사 당시 원형 및 이건 자료 등과의 비교를 통한 원형 검토

○ 경주 고선사지 삼층석탑에 대한 과거 자료 및 보수･보강 이력 검토

○ 기존 정기조사, 정밀안전진단 자료 등의 검토

2) 경주 고선사지 삼층석탑의 현황을 조사하여 기초자료로 활용한다.

○ 지리적 특성, 건축 특성, 배치 등 문화재의 기초 특성 분석

○ 과거~현재 재해·재난 등의 피해 분석

○ 유사한 관련 문화재와의 비교

○ 3D 스캔 데이터를 통한 제원 조사

2. 하중조사

1) 주요 구조부의 구조현황 파악

2) 상부 구조물의 하중조건 파악

3) 구조부재의 연결상태 조사

4) 하중전달체계 파악

3. 성능저하부 조사

1) 구조체의 단위부재별 상태조사: 이격, 박락, 마모, 파손, 오염, 풍화, 이상 변형 등

2) 재료적, 구조적, 환경적 영향요인 분석

3) 3D 스캔 이미지를 활용하여 훼손 조사망도 작성

4. 내시경 조사

1) 석탑 내부의 채움 상태 파악

2) 석탑 접촉상태 확인

5. 석재 성분분석

1) 광물모드 분석[편광현미경 관찰(PM)]

○ 암석의 주구성 광물의 조성

2) 석재표면의 지화학적 거동[전자현미경과 X선 분광분석(SEM/EDS)]

○ 풍화에 수반된 광물의 변이

○ 특정 원소의 오염

3) 광물조성 정성적 분석[X-선 회절분석(XRD)]

○ 암석의 주구성 광물의 조성

4) 주성분 원소에 대한 암석학적 분석[X-선 형광분석(XRF)]

○ 화학조성 분석(조암광물의 상대적 함량비)

○ SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, Cr2O3, TiO2, ig.loss, Total

○ 산화물의 변화양상 분석(석재의 풍화정도 평가)

6. 변위 및 변형조사

1) 3D 스캔 조사를 시행하여 3차원 변위 분석 수행

○ 기단석, 탑신석, 옥개석 등 개별 변위·변형 분석

○ 석탑 전체 수직, 수평, 회전 변위 및 기울어짐 등 분석

7. 초음파 탐상을 통한 압축강도 조사

1) 초음파 측정을 통해 석재의 풍화 정도에 따른 상태등급 판정

2) 석재의 일축압축강도 추정

3) 초음파 측정 시에는 단면이 좁은 접촉자를 사용하여 초음파 속도의 정밀도를 높이도록 함

8. 비파괴 지반조사(지구물리탐사)

1) 지중레이더(GPR) 탐사

○ 지반 내의 공동발생 등의 이상대 존재 가능성 확인

2) 전기비저항 탐사

○ 지하 하부의지질구조[파쇄대, 단층, 층서구조 등] 파악

3) 탄성파 탐사

○ 지반 층서 및 기반암의 심도 파악

○ 지하 지질구조와 암석의 물리적 특성을 규명

9. 구조 안전성 검토

1) 구조물의 하중 전달체계 및 구조시스템 분석

○ 석탑의 하중전달 매커니즘 분석 및 구조 시스템 분석

○ 해당 과정의 결과를 통해 구조물의 안전성 검토

2) 개별요소해석 기법을 통한 구조 모델링 및 구조해석

○ 고선사지 삼층석탑과 같은 조적식 구조물은 근본적으로 연속체 구조물과는 다른 역학적 거동을 나타내는 불연속체 구조물로 다루어져야 하므로 불연속체 특성을 반영할 수 있는 개별요소해석기법을 적용

○ 구조모델링을 수행하고 구조해석을 통한 구조안전성 검토

10. 구조물의 안전성 평가

1) 구조물에 대한 구조적 결함과 손상 원인 분석

2) 현황조사, 변위·변형 조사, 비파괴 조사, 구조안전성 평가결과 등 조사내용을 종합적으로 분석하여 변위·변형, 성능 저하 등 구조적 결함과 손상 원인 규명

3) 조사 등급 부여 (｢국보·보물 건조물 문화재의 보존·관리 규정｣ 제17조(정밀안전진단 결과 등급)에 준용, 2019.01.01.)

11. 보존관리 방안 제시

1) 구조물의 상태평가를 근거로 합리적인 해결방안을 도출하고 향후 보존관리에 대한 문제점을 예측하여 사전 대책 방안을 수립

Ⅲ. 행정 및 일반사항

1. 일반사항

1) 용역책임자는 계약일로부터 7일 이내에 과업 수행계획서를 제출하여야 하며, 용역 계획서에는 연구원 구성 및 용역추진 일정 등이 포함되어야 한다.

2) 용역책임자는 용역일정을 준수하고 감독공무원이 정하는 바에 따라 용역수행 진도를 보고하여야 한다.

3) 용역책임자는 연구원을 변경하고자 할 때에는 감독공무원과 사전 협의하여야 한다.

4) 발주처에서는 관계전문가 또는 관련공무원을 조사현장에 파견하여 조사수행 사항을 확인할 수 있으며, 용역책임자는 이에 협조하여야 한다.

5) 과업내용의 성격상 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우는 일부 과업을 의뢰하여 수행할 수 있다. 일부과업을 의뢰 하고자 할 때에는 해당과업의 결과 및 보완에 대해서 용역수행자가 책임을 진다.

6) 본 용역의 결과물 일체에 대한 소유권 및 저작권은 발주처에 있다.

7) 과업수행 중 과업자료의 분실․도난․누출을 방지하여야 하며 자료의 철저한 보안을 위해서 관리책임자를 지정하여 보안관리 상태를 수시로 점검해야 한다.

8) 용역수행 중 불가피한 연기요청이 필요한 경우 용역수행자는 용역기간연장을 발주처에 요청할 수 있다.

9) 연기 요청시 필요한 서류는 발주처에서 정하는 일체를 제출한다(연장신청서, 연장사유서 등).

10) 성과품은 납품 2주 전 과업내용에 대하여 감독공무원의 사전검토를 받은 후, 과업 완료일까지 납품해야 한다(검토기간은 용역기간에 포함되는 것으로 봄).

11) 발주처가 과업성과품에 대하여 수정․보완해야할 사항을 요구할 경우, 성실히 수정․보완하여 제출하여야 한다.

12) 모든 관련 자료는 일목요연하게 정리하여, 보고서(안)와 함께 제출하여야 한다.

13) 명기되지 않은 사항은 문화재 용역업무에 관련된 법령의 규정에 따르며, 기타 과업수행 시 제기된 문제는 감독공무원과 협의 한다.

14) 과업을 불성실하게 수행할 경우 민사, 형사상 법률에 의거, 국가 및 지방에서 발주하는 입찰에 대하여 불이익을 당할 수 있다.

2. 자문사항

1) 과업수행을 위해 관계전문가 자문위원회를 구성하여 자문을 받도록 하되, 최소 1회 이상의 회의를 개최한다.

2) 자문위원은 용역수행자가 해당분야 문화재위원 또는 전문위원, 국립박물관 또는 국립문화재연구소 직원, 대학 관련학과 교수, 한국문화재보존과학회 회원 중에서 적합한 자를 발주처와 협의하여 선임하도록 한다.

3) 자문위원의 임무는 과업수행에 있어 필요한 중요한 사안이나 문제점을 해결하기 위한 의견을 개진하는 것이다.

4) 자문위원의 과업수행에 대한 자문, 지시, 승인, 확인 등 업무처리는 서면으로 한다.

5) 자문위원의 자문 및 이를 위한 조사 연구에 필요한 출장비 등의 경비는 용역수행자가 부담한다.

3. 특기사항

1) 과업의 변경은, 과업내용이 당초계획과 현저히 다를 경우 발주자가 판단하여, 계약변경이 필요하다고 인정되는 경우 변경할 수 있다.

2) 본 과업지시서에 기술되어 있는 사항은 유동적일 수 있으며, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 일반적인 관행에 따라 당연히 수행되어야할 경미한 사항에 대해서는 상호 협의하여 추진할 수 있다.

3) 중대한 상황의 변경으로 과업의 변동이 불가피할 경우에는 발주자와 사전 협의하여 과업의 범위․내용․기간 등을 변경할 수 있다.

4) 과업수행기간 중, 문화재청 직원이 조사과정을 확인할 수 있도록 조치하여야 하며, 과업진행사항을 발주처와 수시로 협의하여야 한다.

5) 과업수행 시 현장대리인은 조사일정 및 조사방법을 관리자측과 협의하여야 한다.

6) 과업수행 시 현장입구 및 작업현장에 조사안내판과 안내문을 설치하여 출입자의 안전에 유의하여야 한다.

7) 과업수행시 문화재를 훼손하는 행위가 발생하지 않도록 주의한다.

8) 현장대리인은 과업수행시 연구원의 안전사고 예방에 주의하여야 한다.

9) 과업수행의 편의를 위하여 이동, 제거, 가설한 시설물보호 및 보조물은 조사종료시 원상복구 하여야 한다.

4. 성과품 납품

1) 제작방법

○ 과업수행자는 사업종료 2주 이전에 보고서의 초안을 작성하여 감독관의 사전검토를 받아야 하며,  사업 종료시 보고서를 발간하여 제출한다.

○ 성과품과 관련하여 발주처에서 보완, 수정을 요구할 시 과업수행자는 반드시 요구에 응하여야 하며, 이 기간에 소요되는 경비는 따로 지급하지 않는다.

2) 성과품 종류

○ 최종 보고서 30부(올 칼라인쇄)

○ 성과품 저장매체(중간보고서 및 최종보고서 내용 수록) 2개

- PDF파일 형식 포함

○ 보고서 및 조사과정에서 사용된 이미지 파일 일체(외부저장매체)

3) 성과품 납품 방법

○ 용역완료시 과업수행자는 조사내용을 정리한 보고서를 발주처에 납품하여야 한다.

○ 성과품에는 조사기관명, 조사참여자 현황, 자문위원 현황 등이  수록되어야 한다.

○ 성과품에 대한 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의한다.