과 업 지 시 서

- 국립민속박물관 고양이 특별전시 연출 용역 -

2024. 2.

국립민속박물관 전시운영과

구 분	직 책	소 속	성 명	연락처	기 타
사업책임자	학예연구관	전시운영과	위 철	02-3704-3152	como@korea.kr
사업실무자	학예연구사	전시운영과	이주홍	02-3704-3170	lscarlet1@korea.kr

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 국립민속박물관 고양이 특별전시 연출

나. 위    치 : 서울시 종로구 삼청로 37 국립민속박물관 기획전시실 1(약 600㎡)

다. 사업기간 : 계약일로부터 2024. 4. 23.까지

1) 전시물 제작설치 완료 : 계약일~ 2024. 4. 22.

2) 철거 및 원상복구 : 전시종료일(2024. 8. 18.) 이후

라. 사업금액 : 금270,000,000원(금이억칠천만원, 부가가치세 포함)

마. 사업범위

1) 전시 기획 및 시나리오에 따른 디자인 및 전시연출(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

2) 전시연출 및 유지운영을 위한 전시물 제작 및 연출(전시장 내ㆍ외부 포함)

3) 전시 진열장, 받침대, 보조대 및 기타 전시 보조물

4) 전시연출 보조 매체(연출물ㆍ촉각 전시물‧멀티미디어 등 다양한 종류의 매체 활용) 제작 설치

5) 전시 내ㆍ외부 그래픽 제작 설치(패널, 이미지 그래픽, 사인물 등)

6) 전시 종료 후 철거 및 원상 복구

7) 기타 사업에 수반되는 행정 소요 및 우리 관 요구사항

바. 진행일정

1) 사업 발주 및 계약 :□24. 2. ~ 3월

2) 디자인 : 착수일 ~□24. 3. 중순

3) 전시물 제작 설치 :□24. 3. ~ 4. 15.(4. 16. 준공청소 및 유물반입 환경 마련)

4) 전시품 디스플레이 :□24. 4. 17. ~ 4. 18.

5) 전시실 시험운영 및 최종 점검 :□24. 4. 18. ~ 4. 21.

6) 조성완료 : 2024. 4. 22.(월) (*전시개막: 2024. 4. 23.(화))

7) 전시물 철거: 발주처와 협의하여 전시종료 철거 협의(□24. 8. 30.예정)

8) 완료계 및 납품서류 제출 : ~□24. 4. 30.

2. 과업 수행 세부지침

가. 과업 수행 계획서 제출

과업수행자는 계약일을 착수일로 하고 과업을 수행하여야 하며,

과업 착수 후 5일 이내 과업수행계획서(착수계)를 제출하여야 함

나. 과업 수행 방법

1) 일반사항

◦ 과업 수행에 따른 일정 및 방법 등에 대하여 발주처와 사전협의 한다.

◦ 본 과업 지시서에 명시되지 않은 사항은 상호 협의하여 결정한다.

2) 보안 사항

◦ 과업수행 책임자는 과업수행에 따른 자료 등이 타용도에 임의로 사용되거나 외부로 유출되지 않도록 보안대책을 강구하여야 한다.

◦ 기타 보안관련 사항은 국립민속박물관의 ‘보안업무규정’을 준수하여야하며, 과업수행 대표자는 보안각서(제안요청서 서식 14)를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 한다. ※ 보안각서는 과업제안서 제출 시 첨부

3) 세부지침

◦ 실시설계

① 실시설계는 발주처와 협의하여 기본설계안 확정 후 진행하며, 설계도서 및 내역산출은 발주처가 제공하는 일정에 따라 제출 후 승인을 득한다.

② 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

③ 도면 작성은 CAD 작업을 원칙으로 하며 PDF본을 함께 첨부한다. 또한 그래픽 작업시 이미지 파일도 함께 작성 첨부한다. 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

④ 내역 작성 시, 인건비는 시중노임단가를, 자재 및 재료비는 조달청 발행 가격  정보 최근호에 의하되 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용한다. 그 외의 미수록 단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용한다.(공인된 원가계산 기관의 원가계산도 가능함)

※ 납품도서 목록

구분	규격	부수	비고
설계도면	A3	2
각종계산서	A4	2	필요시
내역서	A4	2
일위대가	A4	2
수량산출서	A4	2
단가조사서	A4	2
시방서	A4	2

◦ 제작설치

① 작업 이전 반드시 바닥 및 환·배기구의 보양작업을 실시하며, 소화기 및 안전모 등 현장안전장비를 구비하여야 한다. 용접 등 화기취급작업 필요시는 화기취급작업 허가서를 사전 요청 발급받은 후 진행한다.

② 전시물 제작은 반드시 사전제작 후 현장조립방식으로 운영하여 관람시간 내 소음 등에 의한 민원이 최소화 되도록 한다.

③ 유물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 친환경자재를 사용하며, 진열장에 설치되는 유리는 파손 시 비산되지 않도록 안전필름을 부착하거나 접합유리를 사용한다.

④ 지정 코너의 진열장은 일회용이 아닌 유물의 교체 및 관리가 용이한 준상설타입의 진열장으로 제작하며 사전에 수량, 사양과 세부 제작 디테일에 대해서는 담당자와 사전 협의한다. 기타 제작설치 중 발생하는 문제 및 수정 변경 사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

◦ 전시물 보완: 전시개막 후 제작 설치 하자로 인한 보수 보완 필요시 발주처와 협의하여 조치한다.

◦ 철거 및 원상복구: 전시종료일 이후 발주처와 일정을 협의하여 전시 구조물의 철거 및 폐기를 진행하며 전시실은 원 상태로 복구하여야 한다.

다. 성과품 납품

◦ 과업 완료 후 과업성과품으로 최종도면(CAD 및 PDF변환본), 완료계, 준공사진대장 등의 데이터를 기일 내에 납품하되, 모든 성과품은 발주처와 협의하여 승인을 득한 후 최종 납품 한다.