과업지시서

사 업 명	강진 용운리 10-1호 청자가마 재활용
주관기관	국립광주박물관

2024. 3.

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업책임자	학예연구관	학예연구실	이영범	062-570-7051
사업실무자	학예연구사	학예연구실	고수린	062-570-7806

Ⅰ		사업 개요

사업명: 강진 용운리 10-1호 청자가마 재활용

사업 배경: 도자문화관 신축으로 야외전시장 청자가마 재활용 필요

사업 목적

가. 문화유산의 보존 및 역사·예술·학술적 가치를 공고히 함

나. 청자가마의 전시, 교육, 홍보 등 효율적 활용

사업기간 및 소요예산

가. 사업 기간: 착공일로부터 50일

나. 소요예정금액: 금99,200,000원(금구천구백이십만원, 부가세포함)

사업 수행 내용

가. 예비조사: 청자가마 제원측정, 사진 촬영 등 이전을 위한 상태조사

나. 청자가마 이전: 봉통부 및 소성실 벽체 일부, 석축부, 석부재 등

다. 보호각 철거: 상부 및 내부 보호각 철거

라. 보고서 작성: 이전 과정 및 방법, 재료 등을 정리하여 기록

사업 대상

연번	대상	수량	범위	비고
1	봉통부	1	가마 지붕이 남아있는 부분	이전
2	연소실 벽체	1	길이 1m, 높이 최상부 까지	전사
3	석축부 석부재	1	아궁이 주변 석부재 일체	이전
4	보호각	1	보호각 일체	철거

7. 청자가마 사진

Ⅱ		사업 지침

일반 지침

가. 본 과업은 문화재 관련 법령을 준수하여 조사 및 이전을 실시한다.

나. 재활용 작업 전 기존 자료(기 이전 과정, 3D 데이터 등)를 검토하여 활용한다.

다. 이전 작업은 각 공정에 맞추어 상태를 기록하고 도면 작성과 사진촬영 등을 실시하여 자료를 남긴다.

라. 과업 수행 단체는 제출한 계획서에 따라 조사 및 이전 등의 작업을 성실히 이행하여야 한다.

마. 본 과업수행 참여자는 문화재 이전 복원과 관련한 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적으로 과업이 이루어지도록 한다.

바. 문화재 보존처리 공사는 문화재수리 등에 관한 법률 제16조(문화재수리업의 종류) 및 동법 시행령 제13조(문화재수리업의 종류 및 업무범위)의 규정에 의하여 전문문화재수리업(보존과학업, 업종코드 1127) 등록을 필하고, 문화재 보존처리에 많은 경험이 있는 숙련된 자로서 문화재관련법령이 정하는 보존 과학기술자와 보존과학기능자가 시행하며 유네스코 및 국제박물관회의 등에서 권고하는 보존처리 규범에 따라 처리하여 원형 보존하는 것을 원칙으로 한다.

사. 조사, 해체 및 이전 등이 필요한 경우 문화재보존과학 전공 교수나 관계전문가의 자문 및 지도를 받아 보존처리 하도록 하고, 도급자가 직접 시공하는 것을 원칙으로 한다.

아. 작업에 사용하는 경화제 및 수지 등의 재료는 문화재 수리, 복원용으로 일반화되어 있거나 공인된 것, 또는 문화재 관계 전문기관에서 권장하는 재료를 사용한다.

자. 가마 이전 및 보관 장소는 발주부서와 협의하여 선정한다.

기술 지침

가. 예비 조사

1) 사진 촬영 및 제원 등을 정확하게 기록하여 향후 연구의 기초 자료로 활용할 수 있게 한다.

2) 기존 자료(보고서 및 3D 자료 등)를 활용한 3D 이미지 도면을 작성한다.

나. 청자가마 이전

1) 석축부 넘버링

- 석축부에 수성페인트로 넘버링하여, 향후 연구의 기초 자료로 활용할 수 있게한다.

- 장기보관에 대비하여 석부재 배면에 번호를 각인한 금속 명판을 에폭시 수지로 부착한다.

- 글씨의 크기는 확인이 쉽도록 10mm 전후로 한다.

2) 포장

- 넘버링 한 부재는 목재 패널 또는 개비온블럭(금속망채움블럭) 등의 틀에 포장하여 이동이 용이하도록 한다.

- 석축부는 충격이 전달되지 않는 깊이의 장소에서 관내 보관하되 모래주머니와 함께 작업하여 향후 재활용이 용이하도록 한다.

3) 소성실 벽체 전사

- 가장 양호한 부분을 선정하여 하단에서 최상단까지 약 1×1m 크기로 전사한 뒤 실제 표면이 보이도록 재전사한다.

- 전사한 벽체는 액자틀을 제작하여 전시 및 학술·교육자료 등으로 활용한다.

4) 봉통부 이전 틀 제작

- 봉통부와 연소실 사이 절단 후 이전을 위한 틀을 제작한다.

- 틀은 3ton 이상 운반이 가능하도록 하며, 가볍고 강도 높은 강철파이프를 촘촘하게 용접한 뒤 목재 패널 등을 부착하여 제작한다.

- 밀도가 높고 가벼운 발포용 충전제로 내부의 유구가 흔들리지 않도록 충전한다.

- 제작된 틀은 뒤틀림이 없도록 강철 와이어 등으로 단단하게 고정한다.

- 포장된 봉통부는 지정된 보관 장소로 안전하게 이동한다.

다. 보호각 철거

1) 중장비를 이용하여 외부 보호각을 안전하게 철거한다.

2) 모든 유구 이전 후 매장된 지하 보호각을 철거한다.

3) 철거 후 보호각 폐기물은 지정된 장소에 수집한다.

라. 보고서 작성

1) 예비조사 및 모든 처리 과정, 사용재료 등을의 기록과 사진, 도면 등을 정리하여 결과 보고서를 작성한다.

2) 기존 자료를 활용하여 작성한 3D 이미지 도면을 보고서에 수록한다.

3) 작성한 보고서는 출력물과 PDF 형식으로 제출한다.

납품 지침

가. 과업수행자는 과업기간 내에 모든 과업을 마치는 것을 원칙으로 한다.

나. 과업수행이 완료되면 과업수행자는 성과품과 준공을 위한 서류를 갖추어 발주부서에 제출해야 한다.

1) 완수계 1부

2) 완수내역서 1부

3) 완수성과품(완수사진첩 등) 1식

다. 과업수행자는 과업 수행중 뿐만 아니라 과업이 완료된 후라도 발주처가 협의가 필요시 관련 업무에 대하여 적극 협조하여야 한다.

Ⅲ		사업수행 시 준수사항

관련법령 및 지침

“강진 용운리 10-1호 청자가마 재활용 용역은 문화재 관련 법령을 준수하여야하며 적용되는 법령은 다음과 같다.

가. 문화재보호법 및 시행령, 시행규칙

나. 문화재수리 등에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

다. 문화재수리표준시방서 (문화재청 고시)

일반사항

가. 발주부서와 과업수행자는 본 과업의 목적을 성공적으로 달성하기 위하여 계약의 제반사항과 과업지시서의 내용을 신의에 따라 성실하게 준수하여야 하며, 기타 기재되지 아니한 사항은 발주부서와 협의하여 시행한다.

나. 본 과업은 과업지시서 및 과업수행자가 발주부서에 제출한 수행계획서 및  제 법규 등 관련규정에 따라 수행하여야 한다.

다. 과업을 수행함에 있어 발주부서 협의 없이 처리한 사항에 관한 법적 책임은 과업수행자에게 있다.

라. 과업수행자는 과업을 수행하기 위하여 행하는 제반작업 수행 시 관련법규에 의한 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 과업수행자의 과실로 인하여 작업  도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야한다.

기타사항

가. 모든 결과물은 발주기관의 검수를 필한 후, 사업 완료일까지 납품하여야 한다.

나. 사업수행업체는 이 용역의 결과로 창작된 ‘산출물’과 관련한 저작물의 저작재산권 전부와 저작물을 원 저작물로 하는 2차적 저작물, 또는 저작물을 구성부분으로 하는 편집저작물을 작성 이용할 권리 전부’를 국립광주박물관에 양도한다. 사업 수행업체는 우리 관의 허락 없이 임의로 이를 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다. 이로 인하여 발생한 민․형사상의 책임은 계약수행자에게 있다.

다. 사업수행업체는 성과물 납품시 저작재산권 양도계약서를 함께 제출해야 한다.

라. 사업수행업체는 사업부서의 의견제시나 지시, 감독에 적극 따라야 한다.

마. 규격서 등에 명기되지 않은 사항이 발생할 경우 국립광주박물관과 협의하여야 하며, 상호 의견이 다를 경우 국립광주박물관의 의견을 우선한다.

바. 용역수행 중 현장에서 산업안전보건법(산업안전보건기준에 관한 규칙 등)에 준하여 작업을 수행하여 산업재해를 예방한다.

사. 용역 계획이나 지침에 누락 된 사항일지라도 공정상 당연히 진행해야 할 사항은 수행업체 부담으로 추진하여야 한다.

아. 용역수행 중 계약내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 국가계약법 용역계약 일반조건에 따른다.

자. 과업수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 타당성여부를 면밀히 검토하여 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 국립광주박물관과 협의하여 우선 과업 변경하여야 한다.

차. 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주 기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

카. 작업 시 국립광주박물관의 승인을 받아야 할 사항이 발생했을 때에는 문서 또는 서면으로 통보 후 결과를 보고 진행하여야 한다.

타. 기타 언급되지 않은 사항은 국가계약법, 계약일반조건 등 계약예규에 준한다

계약 특수 조건

다음의 경우에는 계약기간 만료 이전이라도 감독공무원의 요청에 의해 계약담당공무원이 계약을 해지 또는 해제할 수가 있다.

가. 작업 과정이 기존의 목적 등에 부합하지 아니하여 3회 이상 수정을 요구 하였으나, 이에 응하지 않은 경우

나. 수준이 현저하게 미달하여 3회 이상 그 시정을 요구하였으나, 이에 응하지 않은 경우

Ⅳ		착수 및 완료

과업의 착수 및 추진

가. 과업수행자는 계약 체결일로부터 7일 이내에 착수해야 한다.

나. 과업수행자는 아래의 소정의 서류를 갖추어 발주부서에 착수서류를 제출하여야 한다.

1) 계약 제출서류

2) 착수계

3) 과업 참여자 명단

4) 과업수행계획서(수행 계획, 추진일정표 등 포함)

5) 보안유지각서

다. 과업수행을 위한 각종 법률의 인·허가, 출입에 필요한 절차 등은 과업수행자가 담당하며, 행정상 필요한 사항에 대하여는 발주부서가 협조하여 처리한다.

라. 과업수행자는 계약 체결 후 과업 완료까지 참여자를 임의로 교체할 수 없으나 원활한 과업수행을 위하여 필요에 따라 발주부서와 협의하여 참여자를 변경, 추가할 수 있다.

과업의 완료

가. 과업수행자는 과업기간 내에 모든 과업을 마치는 것을 원칙으로 한다.

나. 과업수행이 완료되면 과업수행자는 성과품과 준공을 위한 서류를 갖추어 발주부서에 제출해야 한다.

1) 완수계

2) 완수내역서

3) 완수성과품(완수사진첩 등)

다. 과업수행자는 과업 수행중 뿐만 아니라 과업이 완료된 후라도 발주처가 협의가 필요시 관련 업무에 대하여 적극 협조하여야 한다.

결과물 제출

연번	결과물	규격	형식	수량
1	결과보고서	A4	인쇄본	10부
2	결과보고서 파일	PDF, HWP	USB	2개
3	과업수행에 따른 각종자료	DWG, PDF, HWP
4	사진파일(사진목록 포함)	JPG, HWP

※ 저작재산권 관련 서류(저작재산권 양도 계약서【붙임 1】) 함께 제출

【붙임 1】

저작재산권의 양도 계약서

[저작자 표시]

성  명:

주  소:

연락처:

[저작권자 표시](저작자와 저작권자가 다른 경우)

성  명:

주  소:

연락처:

[저작물의 표시]

저작물: 국립광주박물관 강진 용운리 10-1호 청자가마 재활용

종  별: 이미지파일, 도면, 기록물 등

위 저작물의 저작권자 및 양도인                   과(와) 양수인 국립광주박물관은 다음과 같이 위 저작물에 대하여 저작재산권 양도, 양수 계약을 체결한다.

제1조(계약의 목적) 본 계약은 저작재산권 이전과 관련하여 양도인과 양수인 사이의 권리관계를 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(저작재산권의 양도) 양도인은 위 저작물에 대한 저작재산권 전부와 위 저작물을 원 저작물로 하는 2차적 저작물 또는 저작물을 구성 부분으로 하는 편집 저작물을 작성하여 이용할 권리 전부를 양수인에게 양도한다.

제3조(저작재산권의 이전 등록) 양도인은 위 저작물에 대하여 저작재산권 이전 등록을 할 수 있으며 양도인은 등록에 필요한 서류 등을 양수인에게 제공하여야 한다.

제4조(배타적 이용) 양도인은 저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일 또는 유사한 저작물을 제3자에게 이용하게 하거나 설정 계약 등을 하여서는 아니된다.

제5조(저작재산권의 권리 변동 사항) 양도인은 본 계약 이전에 위 저작물에 대하여 제3자에게 질권을 설정하였거나 저작재산권의 일부 또는 전부를 양도, 이용 허락을 한 사실이 있어서는 아니되며, 이로 인해 손해가 발생하였을 경우 양도인은 그 배상의 책임을 진다.

제6조(저작물의 내용에 따른 책임) 위 저작물의 내용이 제3자의 권리를 침해하여 양수인 또는 제3자에 대하여 손해를 끼친 경우에는 양도인이 그 책임을 진다.

제7조(저작인격권) 양수인이 저작재산권 활용 시 양도인이 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성 유지권)을 이유로 이의를 제기하지 않는다.

제8조 (비밀유지) 양 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과정에서 알게 된 상대방에 관한 정보, 본 계약의 내용 및 대상저작물의 내용을, 상대방의 서면에 의한 승낙 없이 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.

제9조(계약의 해석 및 보완) 본 계약서에 명시되어 있지 아니 하거나 해석상 이견이 있을 경우에는 저작권법, 민법 등을 준용하고, 사회 통념과 조리에 맞게 해결한다.

제10조 (계약 효력 발생일) 본 계약의 효력은 계약 체결일로부터 발생한다.

2024년     월    일

저작권자 및 양도인

성          명:

생  년  월  일:

주          소:

연    락    처:

양수인

성        명: 국립광주박물관

사업자번호: 409-83-02396

주        소: 광주광역시 북구 하서로110

연   락   처: 062-570-7806