제 안 요 청 서

- 2024년 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ

<종이, 봄날을 만나다(가제)> 전시 연출 및

그래픽 디자인 제작 설치 -

2023. 3.

구분	직책	소속	성명	연락처	기타
사업책임자	학예연구관	유물과학과	구문회	031)580-5810	hellocindy@ korea.kr
사업실무자	학예연구사	유물과학과	최미옥	031)580-5844

- 목    차 -

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명	1

2. 사업목적	1

3. 사업개요	1

4. 응모자격	2

5. 제안일정	3

6. 제출서류	3

Ⅱ. 제안지침

1. 기본지침	4

2. 세부지침	5

3. 제안서 작성요령	7

4. 유의사항	8

5. 착수 및 완료	8

Ⅲ. 제안서 평가

1. 제안서의 평가	9

2. 평가항목 및 평가기준	10

3. 저작권 및 사용권	12

4. 응모자의 실격	12

5. 무   효	12

6. 기   타	13

서식 1~14호	14

Ⅰ		사업개요

1. 사 업 명

○ 2024년 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ ‘종이, 봄날을 만나다(가제)’ 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치

ㅇ 전 시 명 : ‘종이, 봄날을 만나다’

ㅇ 전시기간 : 2024. 5. 17.(금) ~ 2024. 9. 22.(일) / 128일간

ㅇ 전시장소 : 국립민속박물관 파주 열린 수장고16

ㅇ 전시유물 : 종이 소장품 및 공예 작품 70여 점

2. 사업목적

가. 전통의 현대적 전승과 개방형 수장고 소장품 활용을 연결하는 민속 브랜드 가치 실현의 장 마련

나. ‘종이’ 소재 소장품과 전통 기술을 현대적 감각으로 재해석한 공예 작품을 재구성하여 ‘민속 공예’와 개방형 수장고 소장품을 바라보는 새로운 시각 확장

다. 주제별 전시 해설 프로그램 운영으로 공예 작품 및 소장품에 대한 이해도 및 관람 만족도 제고

3. 사업개요

가. 위    치 : 파주시 탄현면 헤이리로 30 국립민속박물관 파주

열린 수장고(16 수장고) 전체 204㎡/ 수장대 내부 21.302㎡

나. 사업범위

1) 전시 기획에 따른 전시장 디자인 및 조성(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

2) 전시 연출을 위한 연출물 및 가구류 제작 설치(철거 포함)

3) 전시 받침대 제작 설치

4) 전시 패널 및 설명 카드 등 제작 설치

5) 파사드 및 출구 이미지 월 제작 설치(복도 및 외부 윈도우 그래픽-철거 포함)

6) 전시 연출물 및 보조 영상 제작 설치

7) 전기 및 조명 등 관련 설비 설치

8) 기타 사업에 수반되는 행정소요 및 우리관 요구사항

※ 수장고 환경 특성 상, 모든 집기류 작업은 외부 제작 후 조립 설치로 진행

다. 사업기간 : 계약체결일 ~ 5월 16일까지(철거 및 원상복구 포함)

※ 전시기간 : 2024. 5.17(금) ~ 2024 9.22(일)

1) 기획 및 설계 : 착수일로부터 4월 28일

2) 전시물 제작 설치 : 5월 1일 ~ 13일

3) 전시품 디스플레이 : 5월 14일 ~ 16일

4) 전시실 시험운영 및 최종 점검(완수일) : 5월 16일

5) 전시개막: 2024년 5월 17일(금)

6) 지침서 작성(준공서류 및 납품서류) : ~ 2024년 5월 20일

7) 전시물 철거 및 원상복구 : 발주처와 협의하여 전시종료 후 철거 및 복구 협의

※ 전시품 디스플레이 기간 전까지 전시 대상 소장품 및 작품 반입 가능한 전시환경이 마련되어야 함.

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 전시철거 시 까지

라. 사업예산 : 90,000,000원(금구천만원, 부가가치세 포함)

※ 창작, 전시물 제작‧설치, 제세공과금 등 기타부대비용 일체 포함

마. 당선작 대우 : 설계 및 제작‧설치권 부여

바. 입찰 및 낙찰자 결정방법

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결)에 의함

4. 응모자격 : 입찰공고서 참조

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 자격요건을 갖춘 사업자

○ 「중소기업기본법 시행령」 제8조에 따른 소기업 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업‧소상공인확인서(전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B시스템)에 기타자유업(행사대행업)(업종코드 : 9901)을 등록한 자, 기타산업디자인 전문회사[환경디자인(업종코드:4442)] 또는 [종합디자인(업종코드: 4444)]로 등록된 업체

○ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 의한 직접생산확인증명서(세부품명: 전시회기획 및 대행서비스)를 소지한 자

○ 단독 또는 공동계약(공동이행방식)이 가능함.

5. 제안일정

1) 계약요청 ································································ 2024. 3월 중

2) 입찰공고 게시 ···················································· 입찰공고서 참조

3) 제안서 및 입찰서 제출 ································· 입찰공고서 참조  ※ 현장설명회 없음

4) 제안서 평가 ························································ 제안서 접수마감일로부터 10일 이내

※ 제안서 PT를 요구할 수도 있음(파워포인트 사용 20분 이내)

5) 상기 일정은 발주처와 협의 과정에서 달라질 수 있음.

6) 서면질의 일정 및 방법

① 질의는 이메일(hellocindy@korea.kr)을 통해 서면으로만 가능하며, 이메일 전송한 후 반드시 전화로 접수 여부 확인 (T. 031-580-5844 / 담당자: 최미옥)

② 질의는 접수기간(공고일부터 마감 1일 전까지) 중 근무시간(09:00~18:00) 내 가능하며 질의에 대한 답변은 접수 후 1일 이내 서면으로 진행함

6. 제출서류

가. 제출요령

1) 응모작은 마감시간까지 e-발주시스템을 통해 제출해야 하며, 반드시 나라장터 또는 e-발주시스템에서 제안서 최종제출 여부를 확인하고, 최종적으로 제출한 파일을 다운로드하여 정상여부를 확인하여야 한다.

2) 각 응모자는 1개의 응모작만을 제출할 수 있다.

3) 모든 서류에는 규정에 의한 것 이외의 표시를 금한다. 동 사항을 위반하여 심사위원회에서 불공정행위로 의결될 경우 실격처리 될 수 있다.

나. 제출서류 : 입찰공고서 반드시 참조

① 정성제안서 : 기술제안서/ 발표자료(A3 10매/내용: 설계설명서, 설계도, 예정공정표) 1식

② 입찰참가자격 확인서류(A4/내용 : 서식1-서식14에 해당하는 응모서류) 1식

③ 기타서류(입찰참자자격 확인서류)

※ 제안서 등 제출서류는 나라장터를 통해 전자적으로 제출하여야 하며, 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB를 초과할 수 없습니다.

Ⅱ		제안지침

1. 기본지침

가. 기본방향

1) 본 사업인 『2024년 상반기 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ ‘종이, 봄날을 만나다’ 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치』 용역은 국립민속박물관 파주(이하 파주관)의 수장고 환경에 적합한 효과적인 공간 연출과 전시물 관련 그래픽 디자인 및 제작·설치하는 것을 포함한다.

2) 열린 수장고라는 특수한 공간을 고려한 연출 방법으로 제작·구성하며, 공간과 전시물의 특성을 고려하여 민속, 공예, 문화예술 등 타 분야와 융·복합적 접근으로 실험적 전시를 시도하며, 소장품+공예작품+공간+멀티미디어+조명+음향+그래픽 등 다양한 매체를 활용한 공감각적 전시를 연출한다.

3) 전시 그래픽 및 보조물 설치 시 공간의 기본 구조가 훼손되지 않는 공법을 사용하며, 수장고 내부 환경 유지 및 소장품의 안전을 위해 외부 제작을 중심으로, 현장 조립 설치로 진행한다.

4) 유물보존 및 관람환경을 고려하여 전시 자재는 포름알데히드가 거의 검출되지 않는 최상급 친환경 자재를 사용하며, EU기준 이상을 사용해야 한다. 또한, 필요 시 진열장 내부에 광촉매 시공을 하며, 방염 및 방충처리를 반드시 해야 한다.

5) 전시물 보존 및 관람객 안전을 위하여 방염 처리된 자재를 사용하도록 한다.

6) 전시철거 시 원상복구를 하며 필요 시 전시실 도색을 한다.

나. 일반지침

1) 본 사업의 목적과 제안요구사항을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장여건을 고려하여 계획한다.

2) 전시물은 관련 규정 및 제반 규정에 적법하게 제작‧설치될 수 있도록 계획한다.

3) 대표 국립박물관의 위상에 맞는 품위 있는 전시연출계획 수립한다.

4) 공공문화시설로서 노약자 및 장애자의 편익과 안전성을 도모하는 계획 수립한다.

5) 청소년 단체관람객의 전시실 관람시 안정성과 교육성이 고려된 계획 수립한다.

6) 외국인의 관람 편의성이 고려된 계획 수립한다.

7) 전시물은 예술성, 창작성, 통일성, 기능성을 충족하고 쾌적한 관람환경이 될 수 있도록 계획 수립한다.

8) 기존 각종 설비(전기, 통신, 방범, 공조 등)의 목적과 기능이 유지되도록 계획한다.

9) 전기공사는 자격증을 보유한 전문가가 시공을 해야 하며 시공 부주의로 인한 화재발생시 모든 책임은 공사업체에 있다.

10) 제작·설치 2주 전 전기면허가 있는 업체를 통해 전기배선도면 및 소방도면 제출한다.

2. 세부지침

가. 전시공간

1) 공간구성

○ 공간구성은 전시 기획(안)을 참고하고 작품 설치에 필요한 그래픽, 연출 방법, 보조물 등 모든 제반 사항을 고려한다.

2) 그래픽, 색채구성

○ 전시 연출에 따라 캐릭터 개발이 필요할 수도 있으며 이미지, 서체 사용 저작권 등 문제가 일어나지 않도록 한다.

○ 친환경 자재를 사용하며, 전반적인 색채구성이 상호 연계성과 차별성이 강조되면서도 전체적 조화를 이루어야 한다.

3) 전시조명설비

○ 전시물의 전체조명 및 집중 조명에 적합한 조명배치와 조명기구를 계획한다.

○ 신규조명 설치 시에는 유물의 종류, 박물관 기존 설비 및 전시기법 등을 고려하여 적정한 시스템을 선택(구입 혹은 대여)하여야 하며, 연색성과 색온도 등을 계획 시 반영한다. (framer 혹은 고보 타입 등 포함)

나. 전시시설물

1) 일반사항

○ 전시실 천장, 벽, 바닥, 파티션, 진열장 설치대, 등의 마감 재료 및 디자인은, 주변 시설 및 조명과의 조화, 유물의 안정적 거치 및 보존, 유지 관리의 용이성, 변질 방지 등이 최대한 보장되도록 설계되어야 하며, 수시로 채색과 보수 등 현상 변동을 필요로 하는 설계는 지양한다.

○ 유물 보존 및 관람환경을 고려하여 전시자재는 친환경자재를 사용한다.

○ 전시물의 제작·설치 차후 부품교체, 보수, 철거 등 유지관리에 용이하도록 고려하여 제안한다.

2) 전시연출물(가구 및 집기류)

○ 전시효과와 전시물 보호 기능을 충족시킬 수 있는 전시 연출물을 설계하되 시공성, 경제성을 고려하고 전시 공간과 조화되도록 제작한다.

○ 전시 연출물에 설치되는 유리는 파손시 비산되지 않도록 접합유리를 사용하거나, 비산방지필름(안전필름)을 부착한다.

3) 전시보조물(전시대, 받침대, 패널 등) 설치

○ 전시연출에 필요한 받침대, 전시대, 기타 전시사인물 등은 유물의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출한다.

○ 유물 받침대와 패널, 설명카드, 배너 등은 유물의 안정적이고 무해한 거치‧보존 및 시각 효과와 유지관리의 용이성, 내구성 등을 보장하도록 재질 및 형태, 색채 등이 설계되어야 한다.

4) 보조영상물 설치

○ 보조영상물은 전시를 보완하는 내용으로, 안정적이고 효과적인 설비와 참신한 구성이 되도록 계획되어야 한다. ※ 영상물 세팅, 영상 케이블, 전기설비, 거치대, 영상 셋팅 등 일체(기존 영상 장비 프로젝터 2대 사용 가능)

5) 파사드 및 홍보대 설치

○ 파사드 연출과 홍보대는 전시기획안의 내용을 전달하는 방식이 적절하게 선정되어야 하며 대외적 전시기간 지속가능성이 있도록 구성 계획되어야 한다.

다. 제안 유의사항

1) 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

2) 제안자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공 도중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계상치 않는다.

3) 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

4) 추후에 계약으로 확정된 공사금액에 대한 내역 작성 시, 인건비는 시중노임단가를, 자재 및 재료비는 조달청 발행 가격정보 최근호에 의하되 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용한다. 그 외의 미수록 단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용한다. (공인된 원가계산기관의 원가계산도 가능함)

5) 본 지침서 이외의 수록되지 아니한 사항은 타 일반 공모의 관례에 의하고, 구성과 관련한 기초 자료는 응모자가 조사 및 검토하여야 한다.

라. 제안 참고자료

1) <별첨1> 전시기획안

2) <별첨2> 전시 소장품 및 작품 목록

3) <별첨3> 전시 공간(열린 수장고16) 도면

※ 소장품 고용량 이미지는 국립민속박물관 홈페이지 다운로드(www.nfm.go.kr-소장품 검색)

3. 제안서 작성 요령

가. 제안서의 작성지침

1) 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 한다.

2) 제출된 제안서의 내용은 조달청에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결시의 계약조건의 일부로 간주한다.

3) 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

나. 제안서 작성요령

1) 응모서류는 한글 및 아라비아숫자 표기, 미터법으로 작성 권장한다.

2) 설계도, 설계설명서, 관리운영계획서, 예정공정표를 합본 제본한다.

3) 제안가격에 대한 세부 산출내역서는 우선협상대상자만 기술협상시 수요기관에 제출한다.

4) 설계도 등은 가로방향 작성을 권장한다.

다. 제출도서 세부내용

항목	작 성 내 용	비고
기술 제안서	전시 컨셉 전시 평면 전시 연출 상세(공간, 소장품 및 작품, 마감재, 색채, 조명) 4. 설계에 따른 공정 및 운영 관리 ※ 위 내용이 포함되도록 10매 이내로 구성	총 10매 이내 (지정크기-A3) PDF로 제출

4. 유의사항

가. 제안서 제출사항은 입찰공고문 참조(나라장터)

나. 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

다. 응모자는 제출된 제안서류에 대한 사실여부 등의 책임을 진다.

라. 제안서의 내용을 객관적으로 입증 또는 설명하기 위해 꼭 필요한 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

마. 제안서의 모든 내용은 지적 재산권 관련 사항을 주의해서 작성하여야 하며, 지적재산권 관련 문제 발생 시에는 응모자가 책임을 진다.

바. 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘~를 제공할 수도 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~를 고려하고 있다’ 등과 같이 불명확한 표현은 사용할 수 없다.

사. 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응해야 한다.

아. 본 사업과 관련 이의 및 이견이 있을 경우 응모자는 발주처의 해석에 따라야 한다.

자. 본 사업은 발주처의 내부 사정에 따라 변동될 수 있으며, 이 경우에 제안자는 발주처의 지시에 따라야 한다.

차. 제안 결과에 따른 산출물의 소유권은 국립민속박물관에 있다.

5. 착수 및 완료(결과보고)

가. 전시설계 및 제작은 계약일로부터 10일 이내에 착수해야 한다.

나. 설계보완은 박물관의 최종 승인을 받아야 한다.

다. 박물관의 지시에 따라 검토를 마친 뒤 제작·인쇄하고 세부지침서에 따른 결과물을 제출해야 한다.

라. 결과물은 계약만료일까지 박물관에 제출하여 소정의 검수절차를 거쳐야 한다.

마. 박물관이 결과물에 대해 수정‧보완해야 할 사항을 요구할 경우 완료 후라도 제작자 부담으로 성실히 수정‧보완하여 제출해야 한다.

바. 준공도서 상세내용

○ 설계도서 2부

○ 설명패널, 그래픽 원본 파일 원본 파일

○ 내역서 2부

○ 기타 본 전시물 제작과 관련한 내용(용역 진행과정이 담긴 사진 포함)

○ 전체 내용 및 기타 본 전시물 제작과 관련한 내용을 수록한 저장매체

Ⅲ		제안서 평가

1. 제안서의 평가

가. 평가위원회 구성

1) 제안서의 공정한 기술능력평가를 위해 박물관 내‧외부의 전문가로 평가위원회를 구성한다.

2) 평가위원회 위원은 국립민속박물관에서 5인 이상의 관련 분야 전문가로 선정한다.

3) 평가위원회는 제출된 제안서를 심사하여 종합평가순위를 결정한다.

4) 평가위원의 명단은 공정한 심사를 위해 사전 공개하지 아니한다.

나. 평가방법

1) 평가는 총점 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 80점과 입찰가격평가 20점으로 배점하여 평가하고, 종합평가 순위에 따라 우선협상대상자를 정한다. 다만, 기술능력평가점수가 기술능력평가 배점한도의 85% 미만인 자는 협상대상에서 제외한다.

2) 기술능력평가와 입찰가격평가점수 결과 고득점자 순으로 협상대상자를 선정한다.

3) 업체별 평가 총점을 기준으로 최고점수와 최저점수를 제외한 점수를 합산하여 평균 점수를 산출하되, 최고 또는 최저점수가 둘 이상인 경우 하나만 제외한다.

4) 평가위원별 총계점수 중 최고, 최저 점수는 버리고 나머지 위원의 점수를 산술 평균하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

5) 사업수행능력 평가는 객관적 지표에 의한 평가로서 정해진 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정한다(공동수급시 지분율로 평가)

다. 평가결과 발표

1) 평가위원회는 심사내용을 기록한 보고서를 작성하여 평가위원 모두가 서명하고, 발주처에서는 그 결과를 조달청에 제출하여야 한다.

2) 제안서 평가점수와 업체평가 점수 및 입찰가격을 종합평가하여 협상적격자 선정 후 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에 개찰현황을 공고한다.

라. 기   타

1) 제안서 심사결과 및 세부내용에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 응모자는 평가위원 구성, 평가기준, 평가방법, 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없다.

2) 당선작품 발표 후 5일 내에 반출치 아니한 제안도서는 주최자가 임의 파기한다.

2. 평가항목 및 평가기준

가. 제안서의 평가

○ 평가는 총점 100점 만점을 기준으로 하되 기술능력평가 80점(기술제안서평가 70점, 사업수행능력평가 10점)과 입찰가격평가 20점으로 배점하여  평가한다.

나. 기술능력평가(안)(80점)

【정성평가(기술제안서 평가) : 70점】

구 분		평 가 항 목		배점
제안서 평가	기획 및 제작 계획	전시목적과 전시연출 계획과의 부합성	5	10
		콘텐츠 제작의 적합성(각종 기법 활용 등) 및 연출의 적정성	5
	전시연출 및 공간구성 계획	전시물 디자인의 독창성 (각종 그래픽물, 받침대, 파티션 등)	10	20
		공간구성의 효율성 (전시주제 흐름과 진열장 배치의 상응도)	10
	세부연출 계획	조명연출 계획 및 적정성 (조명기구의 적정성 및 설치방법)	10	30
		색채 및 그래픽 구성의 적정성(공간 및 전시물)	10
		박물관의 특성을 고려한 재료 사용계획 (친환경자재 사용여부)	10
	관리 및 운영계획	사업수행 공정 및 수행방법의 타당성	5	10
		사후관리 및 운영의 용이성 및 경제성	5
합 계				70

【사업수행능력평가 : 10점】

구 분		평 가 항 목		배점
사업수행능력평가	제안서 현황	참여인력의 전문성 및 적절성* (전문인력 보유 현황)	4	10
		재무구조 및 경영의 안정성(신용평가등급)**	6
합 계				10

(1) 전문인력 보유현황(배점한도 4점)*

평가 항목	평가요소	배점	평 가 방 법
			특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
참여 기술자	등급 및 인원	4	0.5	0.45	0.4	0.35
			○ 평점 = 인원 × 기술자별 점수 ※ 최고 배점 4점을 초과할 수 없음

※ 기술자에 대한 등급은 산업통상자원부 공고 “엔지니어링사업대가의 기준” 제11조의 기술자 등급 및 자격기준에 의함

※ 공고일 기준 2개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당[재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서, 국민연금관리공단 확인서 첨부]

(2) 경영상태(배점한도 6점)**

회사채	기업어음	기업신용	배점
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	6.0
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	5.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	5.0
CCC+이하 (미제출자 포함)	C 이하 (미제출자 포함)	CCC+이하 (미제출자 포함)	3.0

※ 조달청 지침 “조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준” 제1장 제9조 제3항 제1호 「경영상태 평가기준」의 「기업신용평가등급」(회사채에 대한 신용평가등급에 준함)에 의한 평가

※ 기업신용평가등급 : 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 발행하는「신용평가 등급 확인서」 다만, 「조달청 신용평가등급 조회 시스템」 또는 「중소기업제품 공공구매정보망」에 의하여 신용평가등급 조회가 가능한 경우에는 동 시스템  조회결과에 의해 평가할 수 있다.

※ 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을  합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다. (예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)

다. 입찰가격 평가(20점)

◦ 입찰가격 평가 평점산식은「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규) 별표에 따른다.

3. 저작권 및 사용권

가. 당선작

1) 당선작의 저작권, 지적재산권, 기타 법적소유권 등 모든 권리는 발주처에 영구 귀속된다.

2) 당선작에 대하여 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우, 당선자가 모든 법적 책임을 진다.

3) 사업추진과정에서 산출되는 모든 자료에 대한 권리는 발주처에 귀속된다.

4) 발주처는 당선작의 수정‧보완 및 변경에 대한 일체의 권한을 가진다.

나. 당선작 이외 응모작

1) 제안자가 제안도서의 반환을 요청 시 설명도판 및 작품모형에 한하며, 심사에 이용된 제안 설명서는 제외한다.

2) 반환 청구는 접수증을 지참하여 청구하여야 하며, 반환기간은 당선작 발표 후 5일 이내로 한다.

3) 반환청구 기간 내 반환 청구가 없을 시에는 발주처에서 임의로 처분한다.

4) 반환에 따른 제반 비용은 제안자의 부담으로 한다.

5) 제안도서의 보관상의 파손 등에 대하여 반환 시 이의를 제기할 수 없다.

4. 응모자의 실격

가. 응모업체가 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

나. 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

다. 접수된 작품을 보완‧변경 등 수정할 경우

라. 제출된 서류 등에 중대한 허위사실이 발견되었을 경우

마. 그 밖에 심사위원회에서 응모작품이 실격이라고 의결한 경우

※ 위 항목 중 한 항목에라도 해당할 경우, 당해 응모자는 실격 처리될 수 있다.

5. 무   효

○ 입찰서류 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출서류상 허위사실이 발견되었을 때는 입상 자체를 무효화 할 수 있음.

6. 기   타

가. 상기 기술한 내용 외에 평가관련 사항은 공개하지 아니한다.

나. 주최자는 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 응모작 제출자는 심사위원 구성, 심사기준, 심사결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없다.

다. 실적증명은 첨부양식을 원칙으로 하되, 기 발행 받은 것은 1년 이내 시 유효하다.(입찰공고일 기준)

라. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 한다.

마. 협상 방법 등 명시되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 및 협상에 의한 계약 체결기준(계약예규)을 준용한다.

바. 전시계획의 설계내역 중 과잉설계, 부실설계, 중복설계 등의 부분에 대해서는 발주기관의 요구에 따라야 한다.

[서식1]

「2024년 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ

<종이, 봄날을 만나다> 전시 연출 용역」

사업수행능력 평가서

2024.    .     .

업 체 명 :  (대표사)

대 표 자 :

주    소 :

전화번호 :            (FAX :              )

작 성 자 :            (연락처 : 휴대폰 / 이메일 기재)

[서식2]

공동제안협정서(예시)

제1조 (목적) 이 협정서는 국립민속박물관에서 시행하는 「2024년 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ <종이, 봄날을 만나다>」 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치 용역을 위한 제안」을 (   )와 (   )가 공동으로 제안하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동제안 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

제3조 (공동제안의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동제안업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                  (소재지 :          대표자 :       )

2. 업체명 :                  (소재지 :          대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 국립민속박물관 및 제3자에 대하여 공동제안업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 제안의 이행으로 종결된다. 다만, 협상작으로 결정되면 국립민속박물관 전시시공완료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동제안업체(자) 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동제안업체(자)의 구성원은 전시연출용역 설치 업무에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 상호 협의하여 배상한다.

제9조 (권리‧의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리‧의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 자격 요건에 미달하게 될 경우에는 제안서를 제출할 수 없다.

② 제안 후 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하고 국립민속박물관의 승인을 받아  탈퇴업체(자)를 교체할 수 있다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동제안협정서를 체결하고 그 증거로 협정서( )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2024.     .     .

○ 대표업체                      업체명 :                 (전화번호)

소재지 :

대표자 :                 (인)

○ 공동제안업체(자)              업체명 :                  (전화번호)

소재지 :

대표자 :                  (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식3]

대 표 자 선 임 계

사업명 :

「"2024년 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ

<종이, 봄날을 만나다>" 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치 용역을 위한 제안」

본인은 국립민속박물관에서 주관하는 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치 용역 및 그래픽 디자인을 위한 제안에 관한 모든 권한을 공동제안대표자에게 위임합니다.

2024.     .

○ 공동제안 대표자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

○ 공동제안자

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식4]

제안사의 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유시에는 공장등록증 사본 첨부

3. 특허보유현황은 관련 특허 개수를 면허증, 허가증, 등록증 보유현황에 표시하고 특허증 사본 첨부

[서식5]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처		국립민속박물관
	증명서용도		「"2024년 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ <종이, 봄날을 만나다>"」 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치 실 적 증 명 용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함.

[서식6]

사업수행 실적 집계표

구 분	공 사 명		공 사 기 간	준공금액	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
①최대실적 (1건)
	소 계
②기타 실적
	소 계
합 계 (①+②)

주)  최근 3년간(공고일 기준) 홍보관, 전시관, 과학관, 체험관 등의 전시물을 제작‧설치한 실적

[서식7]

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
실내건축 기 술 자
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○○
기타

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링사업 대가의 기준에 따르며 <별첨5>참조, 공고일 기준 2개월 이상 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 명기

2. 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3. 자격증, 최종학력증명서, 경력증명서 및 4대 보험 확인서 첨부

[서식8]

행정처분내용

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

※ 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실기재

[서식9]

사 용 인 감 계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 국립민속박물관에서 주관하는 「"2024년 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ <종이, 봄날을 만나다>"」 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치 용역 입찰‧계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민‧형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임 : 인간(법인)증명서 1부. 끝.

2024년    월    일

주  소 :

업체명 :

대표자 :

국립민속박물관장 귀하

[서식10]

위      임      장

대표자	성명		주민등록번호
	주소
	업체명		연락처
대리인	성명		주민등록번호
	주소
	업체명		연락처	☎ : HP :
국립민속박물관에서 시행하는 「"2024년 상반기 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ <종이, 봄날을 만나다>"」 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치 용역에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2024. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 국립민속박물관장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함. ※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐.

[서식11]

서     약     서

국립민속박물관에서 추진 중인 「"2024년 상반기 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ <종이, 봄날을 만나다>"」 전시 연출 및 그래픽 디자인 제작 설치 용역 입찰에 참여한 당사는 국립민속박물관의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며, 응모와 관련한 응모 작품 제출, 심사, 낙찰, 계약 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2024 년   월    일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

국립민속박물관장 귀하

[서식12]

서   면   질   의   서

발송일시	년 월 일
제 안 서 접수번호		연락처	전화 : fax :
업 체 명	(대표: )
제안서 쪽수
질의내용	※ 제안지침서를 다시 한 번 숙지하시어 질문하여 주시기 바랍니다. ※ 명료하게 작성요망바랍니다.

[서식13]

기술능력 제안서표지양식(참고용)

<종이, 봄날을 만나다> 전시 연출 및 그래픽 디자인 용역

2024년

주) 1. 표지크기 : A3

2. 단위는 ㎜

3. 문자는 굴림체, 흑색사용

4. 글자크기 : 제목 30, 72호, 날짜. 22호, 식별번호 22호

<제목 : 2024년 상반기 국립민속박물관 파주 수장형 전시Ⅰ

‘종이, 봄날을 만나다’ 전시 연출 및 그래픽 디자인 용역 제안서>

5. 좌우간격은 중앙 정렬함

6. 표지의 지질은 백색아트지(무코팅) 사용

7. 정성평가(기술평가) 제안서 심사에 제출하는 모든 문서의 여백, 앞뒤, 표지 등 어느 곳이든 작성 또는 공모업체 등을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 하지 않아야 하며, 인지할 수 있다고 객관적으로 판단되는 특정표기가 발견될 시 공정한 심사를 위해 임의로 삭제할 수 있음.

[서식14]

사업수행능력 자가평가표

항 목	세부항목			배 점	평 점	비 고
참여 기술자	특급기술자			각 0.5점
	고급기술자			각 0.45점
	중급기술자			각 0.4점
	초급기술자			각 0.35점
	상 한 점 수			4점
경영 상태	회사채	기업어음	기업신용
	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	6.0점
	BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	5.5점
	B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	5.0점
	CCC+이하 (미제출자 포함)	C 이하 (미제출자 포함)	CCC+이하 (미제출자 포함)	3.0점
	상 한 점 수			6점
합 계				10점

※ 모든 증명자료는‘사실과 상위 없음’을 날인하여 붙임으로 첨부하여야 함. 증명첨부서류에 페이지를 명시하고, 위의 비고란에 증명첨부서류 페이지를 표시함.

※ 기술자에 대한 등급은 산업통상자원부 공고 “엔지니어링산업 진흥법 시행령” <별표 2>의 엔지니어링 기술자(제4조 관련) 등급 및 자격 기준에 의함

※ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의 3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가 등급으로 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가함. 다만 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으나 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가함