예술의 전당

음악당 무대기계 유지보수 및 점검용역

- 과업지시서 -

2024. 4. 5.

예술의 전당 / 무대운영부

- 과업지시서 -

제1장 용역 개요

1. 용 역 명 : 예술의전당 무대기계 유지보수 및 점검용역

2. 용역위치 : 예술의전당 음악당 상부 무대기계 시설물

3. 용역기간 : 2024년 5월 1일 - 2025년 4월 30일

4. 용역개요 : 음악당 상부 기계의 전반에 대하여 항상 정상적이고 안정적인 상태 유지

제2장 일반 과업지시서

1. 본 용역은 과업지시서에 준하여 실시하며,

2. 점검 중 수급자의 고의 또는 과실 등, 어떠한 사유로 인하여 전당의 집기, 비품, 기타         시설물을 파손 또는 훼손하였을 때에는 즉시 수급자의 부담으로 원상복구 또는 변상하여      야 한다.

3. 점검 중 유지관리 대상에 해당하는 시설물의 작동불량 등으로 인하여 발생한 인명재해        및 사고의 일체에 대하여 법적 및 보상책임은 전적으로 수급자에게 있다.

4. 수급자는 작업의 전반에 대하여 전당 담당자의 지시에 따르며, 화재 예방 및 기타 안전      사고 예방에 최선을 다하고, 항상 작업현장 및 주변 환경을 깨끗이 하여야 한다.

5. 무대기계 유지관리, 정기점검의 시기 및 투입인력

가. 정기점검 : 챔버홀, 리사이틀홀을 년 2회 실시하며, 기간은 전당의 상반기(1월)

하반기(7-8월) 점검기간에 준한다.

나. 수시점검

1) 챔버홀, 리사이틀홀 상대로 년 2회를 실시하는 것을 원칙으로 하되, 예술의전당의

사정에 따라 극장 점검횟수 및 일정을 조절할 수 있다.

2) 수시점검의 시기는 극장 사정을 감안하여 전당에서 최소 15일에서 1개월 전에 통보한다.

다. 비상점검 : 긴급을 요하는 점검으로, 전당에서 요구 시에 3시간 이내에 현장에 도착

하여 보수를 행하되, 점검횟수는 수시점검 범위에 포함을 한다.

라. 보수 및 특별점검 : 다음과 같은 사유가 발생 시 에는 무대기계 시설물의 정상 가동을

위하여 최선을 다한다.

1) 수해, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 시설물의 장애 발생시

2) 전당의 사용상 부주의나 과실로 인하여 보수 혹은 점검을 요할시

*2024년 5월 ~ 2025년 4월까지 인력투입계획

점검인원	2024년									2025년			총계
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
	- -	-	-	8명		-	-	-	-	8명	-	-	16명

6. 점검용역 인원의 자격요건 : 고급기술자 1명 외 초급숙련기술자 이상인자

가. 정기점검 시 고급기술자를 1명 이상 반드시 포함한다.

나. 고급기술자 자격기준

- 자격기준 : 해당분야 기사자격 7년 이상, 산업기사 10년 이상.

7. 작업시간 : 1일 8시간을 준한다.

8. 작업범위

가. 육안검사

나. 기능검사

다. 안전검사

라. 시설물 조정 작업

마. 점검사항 기록

바. 시설물 유지 및 보수에 대한 서비스

9. 점검결과서 제출 : 일일 작업현황 파악 및 향후 유지 보수를 위해 최종적인 정기점검 결과서를 상세히 기록하여 최종작업 종료 후 15일 이내에 제출한다.

10. 기술력 및 정보 제공 : 기술진은 시설물 유지보수를 기술력 및 향후 시스템 개보수를  위해 장비의 수명, 개보수 범위, 예상 소요예산 등 서비스를 제공한다.

11. 점검을 실시하되 우선적으로 현재까지 나타난 문제점 가운데 운용에 심각한 점부터 해결토록 한다.

12. 점검과정에서 돌출되는 문제점에 대하여는 그때마다 전당에 전달하여 문제점 해결을  신속하게 처리할 수 있도록 한다.

13. 작업여건 : 전당은 점검, 유지보수, 수선작업을 위하여 다음과 같은 작업여건을 충족  시켜 준다.

가. 상부기계에 설치되어 있는 장치물은 가능한 범위에서 철거하여 주고, 모든 시설물은

점검 및 유지보수를 위해 전당의 담당자 입회하에 자유롭게 사용할 수 있게 한다.

나. 작업 중단이나, 작업의 방해요소 등의 배제

다. 작업등이나 전원사용은 무료로 공급한다.

라. 기술진이 머무를 수 있는 공간과 공구 및 장비를 보관할 수 있는 창고를 무료로 제공

하고, 도면도 자유롭게 이용할 수 있도록 한다.

14. 교체 또는 윤활에 필요한 간단한 부품이나 윤활유는 용역업체에서 무상 공급하되, 유ㆍ무상

공급의 기준은 다음에 준하여 적용한다.

가. 단위 어셈블리에 소요되는 부품의 단가가 10만원 이상 되는 것은 전당에서 지급 또는 부담한다.(부품단가의 기준은 가격정보를 기준하되, 가격정보에 없는 부품은 시장조사 가격을 적용)

나. 부품의 품질은 최상급을 적용하되(외산포함), 이에 대한 판단은 전당의 담당자가 한다.

제3장 특기시방

유지보수, 정기점검용역 범위 및 점검사항

1. 챔버홀 – 총12조

가. 상부기계

1) 조명 바톤(6조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 와이어로프,

풀리, 파이프, 케이블드럼

2) 스크린 바톤(1조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 와이어로프,

풀리, 파이프

3) 세트 바톤(1조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 와이어로프,

풀리, 파이프

4) 스피커 포인트 호이스트(4조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 와이어로프,

풀리, 파이프

2. 리사이틀홀 - 총2조

가. 상부기계

1) 세트 바톤(2조)

철 구조물, 드라이브 유니트(모터, 브레이크, 커플링, 기어박스, 드럼), 와이어로프,

풀리, 파이프, 케이블드럼