차세대통합정보시스템 구축 사업 PMO 용역

- 제안요청서 -

2024. 4.

				목 차

1. 사업 개요	1

가. 추진배경 및 필요성

나. 대상사업 개요

다. 사업범위

2. PMO 대상사업	2

가. 사업개요

나. 추진 목표

다. 추진 범위 및 내용

라. 사업추진체계

마. 사업추진 일정

3. 제안요청 내용	8

가. 사업범위

나. 추진내용

다. 요구사항 목록

라. 상세 요구사항

4. 제안 안내사항	23

가. 입찰방식

나. 제안서 평가 방법

다. 기술성 평가 기준

라. 제안서 작성지침 및 유의사항

마. 제안서 목차

바. 세부 작성 지침

사. 제안서 제출 일정 및 방법

아. 제안설명회 개최

자. 입찰 시 유의사항

차. 제안서 보상

카. 기타사항

기타. 입찰 참가 제안 요청 서식	33

1. 사업개요

가. 사업일반

ㅇ 사업명 : ‘차세대 통합정보시스템 구축’사업 PMO 용역

ㅇ 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2026. 12. 31.

＊사업기간은 대상사업 일정에 따라 상호 협의 하에 변경될 수 있음

ㅇ PMO 용역 예산 : 839백만원 (장기계속계약, VAT포함)

* 당해연도 사업이 아닌 총차년도 사업 기준으로 투찰

<단위 : 백만원,VAT포함>

구분	||	사업 기간		예산
1차	||	계약 후 365일		326
2차	||	1차 종료 후 365일		326
3차	||	2차 종료 후 365일		186

※ 연도별 사업예산은 예산배정에 따라 변경 가능하며 계약자는 전체 사업 예산 범위 내에서 연도별 계약금액, 사업범위, 기간 등을 협의하여 조정 가능

ㅇ 계약방식: 협상에 의한 계약(제한경쟁 입찰)

나. 추진배경 및 필요성

ㅇ 공공정보화사업 추진 환경이 대기업에서 중소기업 중심으로 변화함에 따라 사업 성공을 위한 전문적 사업관리 강화 필요

- 사업발주자 입장에서 전문적인 사업관리조직(PMO)의 지원을 통해 문제에 대한 사후검증이 아닌, 사전 예방 등 품질 높은 사업관리 추진 필요

ㅇ 전문적인 사업관리조직(PMO)의 사업 참여를 통해 대형 IT업체에 의존하는 기존의 발주관행을 개선하여 중소/중견기업 공공 IT사업 참여기회 확대 제공

ㅇ 차세대 통합정보시스템 구축 사업에 사업관리 위탁(PMO) 제도를 적용함으로써 안정적이고 성공적인 사업추진 도모

다. 사업내용

ㅇ (기획단계) 사업계획, 과업내용 분석 및 조정, 제안요청서 작성, 사업자 선정 및 기술협상 지원 등

ㅇ (집행단계) 사업 진행점검, 과업 변경 분석 및 대안 제시, 중장기 정보화 전략계획 현행화 등

ㅇ (사후관리단계) 시스템 안정화 지원 및 하자 관리 등

라. 기대효과

ㅇ 차세대 통합정보시스템 구축 과정의 업무 전반에 걸친 합리적 의견수렴 및 신속한 의사결정체계를 구축하여 성공적인 사업 수행

ㅇ PMO를 통해 차세대 통합정보시스템 구축 과정에서 예상되는 위험을 사전에 식별하고 대처하여 프로젝트의 이슈 및 위험관리 강화

ㅇ 품질관리 활동 전문화, 체계적인 변화관리, 프로젝트 관리 투명화 등을 통한 차세대 통합정보시스템의 품질 확보

ㅇ 23년 완료한 『차세대 통합정보시스템 구축 전사적정보화전략계획(ISP)』현행화를 통한 차세대 통합정보시스템 구축 사업 추진 동력 확보

2. PMO 대상사업

가. 사업개요

ㅇ 사업명 : 차세대 통합정보시스템 구축

ㅇ 사업비 : 13,388백만원 (장기계속계약, VAT포함)

<단위 : 백만원,VAT포함>

구분	||	사업 기간		예산
1차	||	계약 후 360일		4,400
2차	||	1차 종료 후 300일		4,968
3차	||	2차 종료 후 240일		4,020

※ 1차년도(2024년도) 예산은 확정된 예산이며, 2025년도 이후는 예산 심의과정에서 예산안이 조정될 경우 대한장애인체육회와 계약자는 제안요청서의 과업내용 및 사업기간 등을 협의·조정

※ 연도별 사업예산은 예산배정에 따라 변경 가능하며 계약자는 전체 사업 예산 범위 내에서 연도별 계약금액, 사업범위, 기간 등을 협의하여 조정

ㅇ 사업기간 : 계약체결일부터 3개년

ㅇ 계약방법 : 협상에 의한 계약(제한경쟁 입찰)

나. 추진 목표

ㅇ 수요자 중심의 장애인 체육 디지털 통합 플랫폼 구축을 위한 「KPC 디지털 혁신」 실현

다. 추진 범위 및 내용

1) 목표시스템 개념도

ㅇ 차세대 통합정보시스템은 장애인체육인 중심 통합 포털, 통합 경영정보시스템, 빅데이터 기반 스포츠 과학분석 시스템 등 기능 으로 구성

2) 사업주요내용

ㅇ  차세대 통합정보시스템 개발 대상 업무는 크게 장애인체육인 중심 체육서비스 통합, 협업 기반 스마트 경영지원체계 구축, 통합 데이터관리 기반 분석•활용체계 구축, 통합 운영기반 新 IT관리 체계 구축 부문으로 구분 정의

대분류	중분류	개발내역 정의
장애인체육인 중심 체육서비스 통합	장애인체육인 중심의 통합포털구축	• KPC 홈페이지, 통합정보센터, 생활체육정보센터 등 대민 홈페이지의 유기적 통합 • 통합 대상 홈페이지의 메뉴•기능 재편 • 전문 및 생활체육인 사용자 중심 UI•UX 개선(장애인 웹 접근성 적용, 사용자 인증체계 포함) • 사용자 편의 기반 맞춤형 콘텐츠 추천서비스 구현
	체육진흥사업 통합관리시스템구축	• 통합정보시스템, 서훈관리시스템, 경기운영시스템, 선수촌관리시스템, 생활체육정보센터, 장애인체력인증 관리자 등 전문 및 생활체육 부문 관리시스템의 유기적 통합 • 전문체육인 정보관리 확대를 위한 선수육성관리시스템, 스포츠등급판정시스템 신규 구축 • 생활체육사업 정보관리를 위한 메뉴•기능 구현 • 가맹단체 및 시도지부 현황관리 메뉴•기능 구현 • 전문체육인, 생활체육인, 초•중등학생 대상 교육관리 메뉴•기능 구현
협업 기반 스마트 경영지원체계 구축	협업 기반 업무 포털 구축	• KPC임직원 및 가맹단체•시도지부 업무담당자의 업무처리를 위한 전자결재, 이메일, 메신저, 일정관리, 업무 신청, 협업 관리, 소통 관리, 웹 팩스시스템 등으로 구성된 업무 포털구축
	차세대 경영정보시스템 (ERP) 구축	• 예산, 인사관리시스템 재구축 • 시스템 미지원 업무영역(구매계약관리, 총무관리, 감사관리, 성과관리, 위탁용역관리, 위원회 관리)의 신규 메뉴·기능 구현 • 업무처리자동화(RPA) 도입 및 확산
통합 데이터 관리 기반 분석•활용 체계 구축	통합 데이터 관리체계 구축	• 내•외부 시스템 통합으로 인한 신 통합 데이터베이스(DB) 설계 • 현 내•외부 시스템 데이터 이관(마이그레이션) • 통합 데이터 관리체계 정립 • 내•외부 시스템 관련 정보연계 구축
	스마트 통계 시스템(EIS) 구축	• 전문체육, 생활체육, 선수촌, 경영지원 등 조직 및 업무영역별 현황 통계자료 생성•활용 • 회장, 사무총장, 부서장 등 업무 관련 의사결정 및 대외기관 대응을 위한 KPI 중심의 통계자료 제공 • 통계분석을 위한 분석솔루션 도입
	빅데이터 기반 스포츠과학 분석 시스템 구축	• 선수 바이오, 심리, 체력, 기술(경기기록), 음식, 의료 등 측정 데이터 기반 경기력 향상 분석 모델링 수립 • 데이터 수집-전처리-저장-분석-활용 등 빅데이터 분석 프로세스 관리시스템 구축 • 외부 유관 정보연계 구축
통합 운영 기반 新 IT관리 체계 구축	클라우드 기반 인프라 구축	• 내•외부 시스템 통합으로 인한 신 클라우드 기반 인프라 구성 설계• 노후장비 및 유휴장비 재배치 • 민간 클라우드 전환 영역 식별 및 추진방안 마련 • 정보보안체계 강화 • 장기계속계약에 따른 하이브리드 운영 방안 제시 • 클라우드네이티브기반 프레임워크를 활용한 표준 프레임워크 제공

라. 사업추진체계

1) 추진체계

내부 TF						사업 총괄					PMO
주요기능 활용 부서 업무담당자						경영지원부					시스템 구축 전체에 대한 검토/가이드
운영조직						수행기관					감리
체육단체 (중앙/시/도 가맹단체, 시/도 체육회)						시스템 구축 SI업체					시스템 구축 감리

2) 추진 주체별 주요업무

구 분	구 성	담당업무
사업총괄	경영지원부	ㅇ 차세대통합정보시스템 구축 총괄
내부TF	정보화 담당자 현업 담당자	ㅇ 시스템 구축 관련된 실무 업무 정보 제공 ㅇ 업무분야별 정보화 방법에 관한 의견 제시 ㅇ 구축 시스템에 대한 검토 및 테스트 진행
PMO	(별도)선정 업체	ㅇ 차세대통합정보시스템 구축 관련 모든 수행내역 가이드 - 정보시스템 기획, 중간결과물, 최종결과물 검토
수행기관	시스템 구축팀 (용역 업체)	ㅇ 차세대통합정보시스템 신규 개발 ㅇ 구축 프로젝트 사업공정 및 품질관리 ㅇ 사용자 교육, 운영 전반에 걸친 기술지원 ㅇ 요구사항 이행 검증 및 변경관리 조정 ㅇ 구축 산출물에 대한 테스트 진행 및 결과 관리 ㅇ 과업 수행을 위한 전략, 조직, 일정 등 마스터플랜 수립 ㅇ 테스트 진행 및 하자보수 지원
운영조직	체육단체 (시/도 종목단체,시/도 체육회)	ㅇ 요구사항 및 개선의견 제시
감리	(별도)선정 업체	ㅇ 차세대통합정보시스템 구축 감리

마. 사업추진 일정

ㅇ 계약일로부터 3개년

* ‘차세대통합정보시스템 구축(1차년도)’ 사업을 기준으로 함

세부일정	(M-3)		(M-2)		(M-1)		(M)		(M+1)		(M+2)		(M+3)		(M+4)		(M+5)		(M+6)		(M+7)		(M+8)
통합사업관리(PMO)
o 구축 사업계획 수립 및 사전협의
o 구축입찰공고, 제안 평가
o 구축사업자 선정 및 계약 체결
구축 1차년도
o 분석설계
- 시스템 설계
- 데이터베이스 설계
- 화면/보고서 설계
o 개발
- 코딩
- 단위테스트
o 테스트
- 통합테스트
- 산출물작성
o 시험운영 및 보완
o 오픈 및 정상운영

* 상기 일정은 발주부서와 협의하여 조정할 수 있음

3. 제안요청 내용

가. 사업범위

1) PMO 대상 사업범위

ㅇ 시스템구축, 인프라 도입 등 대상사업 및 관련 사업 일체에 대한 프로젝트 통합관리 및 이행감독 지원

ㅇ PMO 대상사업이 안정적이고 성공적으로 추진될 수 있도록 단계별 (집행관리, 사후관리, 안정화지원) 통합 PMO 업무 수행

- (기획단계) 사업계획 및 과업내용 분석・조정, 구축사업사업자 평가 및 선정 지원

- (집행단계) 시스템구축, 인프라 도입 등 관련 사업추진 시 통합, 이해관계자, 범위, 자원, 일정, 위험, 품질, 성과, 조달 등 체계적인 사업관리 및 응용, 데이터, 아키텍처, 보안 기술영역에 대한 설계・구현·시험・전개 단계별로 관리·감독 및 기술지원 업무 수행

- (사후관리단계) 시스템구축, 인프라 도입 등 관련 사업 종료 후 산출물 관리 지원 및 정보시스템 변화관리, 교육, 성과목표 달성여부 점검 등 사업종료 후 사후관리 업무 수행

ㅇ 차세대 통합정보시스템 중장기 발전방안 수립

- 차세대 통합정보시스템 구축 후, 고도화를 위한 중장기 발전 방안 수립

- 차세대 통합정보시스템 구축 ISP 이행과제를 분석하여 미 이행과제의 중장기 로드맵 수립

- 미 이행과제의 소요예산 산정 및 예산요구서 작성

ㅇ 차세대 통합정보시스템 구축을 위한 BPR

- 업무기능 및 절차, 프로세스 현황분석

· 업무기능 및 절차, 프로세스 맵(업무 흐름) 및 설명서 작성

- 통합정보시스템 기능(서비스), 연계, 데이터, 인프라(정보보안) 현황 분석

- 다양한 내□외부 이해관계자 요구사항 조사 및 분석

- 유사한 기관의 우수한 정보시스템 구축 사례 조사 및 분석

- 환경 및 현황분석에서 도출된 이슈 및 문제점에 대한 개선 과제 도출

· 단위 업무 및 업무수행자 중심 이슈 분석 및 개선 과제 도출

- 각종 현안 해결을 위한 차세대 통합정보시스템의 목표 업무 프로세스 설계

- 목표 업무 프로세스로부터 차세대 정보화 대상(신규, 기능 고도화, 통합, 유지, 삭제 등) 기능 및 개선 효과 도출

나. 추진내용

수행단계	관리항목	세부업무
기획단계	통합관리	1. 사업계획 수립 지원 2. 사업대가 산정 지원 3. 제안요청서 작성 지원 4. 사업자 선정 및 기술협상 지원
	성과관리	1. 사업목표 수립 지원 2. 세부 성과지표 및 목표치 수립 지원
집행단계	통합관리	1. 사업착수 관련 계획의 검토 및 조정 2. 사업 진행상황 모니터링, 검토 및 조정 3. 과업 변경영향 분석 및 대안 제시 4. 설계·종료 단계 기능점수 적정성 검토 5. 사업의 검사·인수 지원 6. 하자보수 계획 및 절차 검토·조정 7. 적용된 사업관리 절차 및 방법론의 지식화 8. 위험 및 쟁점 사항에 대한 지식화
	이해관계자관리	1. 이해관계자 식별 및 영향도 분석 2. 이해관계자 의견 반영여부 점검 및 조치사항 지시
	범위관리	1. 사업범위 검토 및 조정 2. 요구사항 분석내용의 점검 및 추적관리 3. 사업범위 변경통제
	자원관리	1. 투입인력 계획의 적정성 검토 및 조정 2. 투입인력 계획의 준수여부 점검 및 조치사항 지시 3. 인력변경 적정성 점검 및 조치사항 지시 ※ 단, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 제42조 단서조항 해당 사업에 한함
	일정관리	1. 일정계획 검토 및 조정 2. 진척상황 점검 및 지연시 조치사항 지시 3. 일정변경 요청의 타당성 검토 및 대안제시
	위험관리	1. 위험 관리계획 검토 및 조정 2. 위험사항 식별 및 분석 3. 위험 대응계획 검토 및 조정 4. 위험 대응상황 점검 및 조치사항 지시
	품질관리	1. 품질 및 시험 관리계획 검토 및 조정 2. 방법론 검토 및 조정 3. 품질·시험 활동 점검 및 조치사항 지시
	성과관리	1. 성과 관리계획 수립 2. 단계별 성과지표 평가
	조달관리	1. 하도급 및 조달 계획 점검·조정 2. 하도급 및 조달 계획의 이행상황 점검,조치사항 지시
	의사소통관리	1. 의사소통 계획 검토 및 조정 2. 사업추진 상황 및 쟁점사항의 정기·비정기 보고 3. 발주기관의 의사결정 지원
	변화관리	1. 변화관리 계획 검토 및 조정 2. 변화관리 계획의 이행여부 점검 및 조치사항 지시
	보안관리	1. 보안 및 개인정보보호 관리계획 검토·조정 2. 보안 및 개인정보보호 관리계획 이행여부 점검, 조치사항 지시
사후관리단계	통합관리	1. 정보시스템 안정화 지원 2. 위탁대상사업 및 위탁용역 산출물의 활용·관리 지원 3. 하자여부의 검토 4. 하자보수 이행 관리 지원
	변화관리	1. 정보시스템 변화관리 지원 2. 교육 및 홍보 지원
	성과관리	1. 성과지표 달성여부 평가

다. 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 번호		요구사항 명칭
컨설팅 요구사항 (CNR)	CNR	001	통합관리
	CNR	002	이해관계자 및 의사소통 관리
	CNR	003	범위관리
	CNR	004	자원관리
	CNR	005	일정관리
	CNR	006	위험관리
	CNR	007	품질관리
	CNR	008	조달관리
	CNR	009	변화관리
	CNR	010	아키텍처관리
	CNR	011	이행관리
	CNR	012	테스트관리
	CNR	013	산출물관리
	CNR	014	차세대통합정보시스템 로드맵 수립
	CNR	015	이해관계자 요구사항 분석
	CNR	016	업무 현황분석(BPR)
	CNR	017	정보시스템 현황 분석
	CNR	018	목표 업무 프로세스 재정립(BPR)
프로젝트 관리 요구사항(PMR)	PMR	001	수행전략
	PMR	002	수행계획
	PMR	003	수행조직구성
	PMR	004	수행인력관리
	PMR	005	수행환경
프로젝트 지원 요구사항(PSR)	PSR	001	기술자문
제약사항 (COR)	COR	001	하도급 허용 여부
보안 요구사항(SER)	SER	001	보안지침 준수
	SER	002	보안 요구사항
	SER	003	물리적 보안요건
	SER	004	기술적 보안요건
	SER	005	참여인력 보안서약 및 책임 등
	SER	006	외부 PC 관리
	SER	007	해킹, 바이러스 등 침해사고 예방대책
	SER	008	사업관련 자료 보안방안
	SER	009	문서 관리

라. 상세 요구사항

1) 대상사업 관리 요구사항

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-001
요구사항 명칭		통합관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－사업 착수 관련 계획의 검토 및 조정 －사업 진행상황 모니터링, 검토 및 조정 －과업 변경영향 분석 및 대안 제시 －기능점수 산출 지원 및 적정성 검토 －사업의 검사·인수 지원 －하자보수 계획 및 절차 검토·조정 －적용된 사업관리 절차 및 방법론의 지식화 －위험 및 쟁점 사항에 대한 지식화 －정보시스템 안정화 지원 －산출물의 활용·관리 지원 －하자여부의 검토 －하자보수 이행 관리 지원

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-002
요구사항 명칭		이해관계자 및 의사소통 관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－이해관계자 식별 및 영향도 분석 －의사결정 결과에 영향을 주거나 받는 개인･그룹･조직 식별 －이해관계자의 참여, 상호작용 등 사업에 영향력을 끼치는 내용을 분석하고 문서화 －이해관계자에 대한 의사소통 방안 제시 －이해관계자 의견 반영여부 점검 및 조치방안 제시 －이해관계자의 의견 반영여부 모니터링 수행 －의사소통 계획 실행상태의 주기적인 점검 시행

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-003
요구사항 명칭		범위관리
요구사항 상세설명	세부 내용	-사업범위 검토 및 조정 - 사업수행계획서(WBS포함)에 제안요청서･제안서･계약서 내용이 누락없이 반영하였는지 등 적정성 검토 수행 －요구사항 분석내용의 점검 및 추적관리 －요건정의 내역의 기능·기술 구현 가능여부 검증 및 개선의견 제시 －정책･제도 변화에 따른 범위 변경사항의 영향도 분석 및 반영여부 확인 등 －사업범위 변경통제 －요구사항 변경의 모니터링 및 관리 －변경 적정성 검토 및 영향도 분석 －변경요건의 단계별 통제방안 제시 및 관리

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-004
요구사항 명칭		자원관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－투입인력 계획의 적정성 검토 및 조정 －인적자원 운영계획 수립 －투입인력의 가용성 최적화를 위한 검토 －핵심인력의 이탈 방지 및 이탈시 대응방안 제시 －투입인력 계획의 준수여부 점검 및 조치방안 제시 －인력변경 적정성 점검 및 조치방안 제시 －인력의 정기적인 현황 파악 및 인력변경 관리 －인력 교체･철수시 업무연속성 유지방안 수립

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-005
요구사항 명칭		일정관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－일정계획 검토 및 조정 －일정계획의 적정성 평가를 통한 조정 및 확정 －진척도 측정기준 수립 －진척상황 점검 및 지연시 조치방안 제시 －진척상황에 대한 모니터링 －사업의 공정 추가, 변경 및 삭제에 따른 일정 변경통제 방안 제시 －진척율 지연시 대응방안 제시 －일정변경 요청의 타당성 검토 및 대안제시 －일정변경에 따른 영향평가 및 의견제시

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-006
요구사항 명칭		위험관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－위험 관리계획 검토 및 조정 －사업의 위험관리 활동에 대한 전반적인 계획 수립 －위험사항 식별 및 분석 －사업 수행에 영향을 끼칠 수 있는 위험들을 식별하고 분석하여 문서화 －위험 대응계획 검토 및 조정 －위험 대응방안을 계획·수립하고 사업 전단계에 걸쳐 발생가능한 위험의 최소화 방안 제시 －일정지연, 품질저하 등 위험 발생을 사전 예방하고, 발생시 사후 대처방안을 제시 －위험 대응상황 점검 및 조치방안 제시 －점검 결과에 따른 조치방안 제시 －업무별 기술적인 이슈·위험요소를 도출하고 대안제시

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-007
요구사항 명칭		품질관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－품질 관리계획 검토 및 조정 －사업에 대한 품질 요구사항과 이를 준수하기 위한 품질활동계획 수립 －방법론 검토 및 조정 －품질관리 방법론 및 표준 가이드 제시 －품질활동 점검 및 조치방안 제시 －품질보증 계획서를 점검하여 계획의 타당성, 실현가능성 등 검토 －적합한 품질표준이 준수되고 있음을 확인할 수 있는 품질통제 방안 수립 －품질관리활동을 정량적·정성적으로 확인할 수 있는 방안 제시 －품질활동을 통해 도출된 문제점에 대한 조치 결과를 확인할 수 있는 방안 제시 －외부감리보고서에서 제시한 개선권고사항이 적정하게 시정조치계획에 반영되었는지 여부 확인

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-008
요구사항 명칭		조달관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－하도급 및 조달 계획 점검·조정 －하도급 및 조달 계획의 점검·조정 방안 제시 －하도급 및 조달 계획의 이행상황 점검, 조치방안 제시 －조달관계를 관리하고 계약성과를 모니터링하며 필요한 변경과 시정 조치를 추천

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-009
요구사항 명칭		변화관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－변화관리 계획 검토 및 조정 －사업의 변화관리를 위한 계획 수립 －변화관리 계획의 이행여부 점검 및 조치방안 제시 －변화관리 계획의 실행결과를 확인하고 보완하는 등 필요한 대책 제시 －교육 및 홍보 지원 －대상자별 교육수행계획 수립 －사용자 교육을 위한 업무 매뉴얼 작성 지원

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-010
요구사항 명칭		아키텍처관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－아키텍처 관리를 위한 전문적 의견 제시 및 기술 지원 －기술인프라 설계의 적정성 검증 및 모니터링 －신규 솔루션 도입･이관 등 사업 수행에 영향을 미치는 기술관련 주요 이슈사항에 대한 검토 수행 －주요 기술현안에 대한 해결 지원

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-011
요구사항 명칭		이행관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－안정적인 이행을 위한 계획의 점검･조정 －이행 전략 및 가이드라인 제시 －이행의 적정성 점검 및 조치방안 제시 －이행계획의 적정성 검토 및 이행 결과 검토 －제안요청서와 사업수행계획서에 따라 적절하게 이행되었는지 점검

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-012
요구사항 명칭		테스트관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－테스트 관리를 위한 계획 및 적정성 검토 －단계별 테스트 전략 수립 및 테스트 가이드 제시 －테스트 범위, 수행절차, 조직, 일정, 역할 등 구체적인 평가기준 수립 －시스템 성능 및 가용성 목표에 대한 기준 수립 －테스트 계획의 적정성 검토 －테스트 수행의 적정성 점검 및 조정 －테스트 계획에 따른 수행 여부 점검 －기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 －내·외부 시스템간, 단위시스템간 연계 등 검증 －시스템 접근권한, 업무적 권한관리의 적절성 검증 등

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-013
요구사항 명칭		산출물관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－개발방법론에 따라 산출물 종류 및 품질의 적정성 검증 －산출물 중 각종 안내서(사용자 안내서 등) 포함 －제안요청서 및 사업수행계획서에 제시한 산출물의 수행 여부 점검 －산출물의 단계별 검사기준 제시 및 검사 지원

요구사항 분류		대상 · 사업 관리	요구사항 번호	CNR-014
요구사항 명칭		차세대통합정보시스템 로드맵 수립
요구사항 상세설명	세부 내용	- 차세대 통합정보시스템 중장기 발전방안 수립 －차세대 통합정보시스템 구축 후, 고도화를 위한 중장기 발전 방안 수립 －차세대 통합정보시스템 구축 ISP 이행과제를 분석하여 미 이행과제의 중장기 로드맵 수립 －미 이행과제의 소요예산 산정 및 예산요구서 작성

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-015
요구사항 명칭		이해관계자 요구사항 분석
요구사항 상세설명	세부 내용	- 인터뷰 계획 수립 －설문 및 인터뷰 대상자 확인 및 일정 수립 －인터뷰 스케줄 작성시 현업 및 시스템 담당자가 1명 참여 －설문 및 질의 및 자료 준비 ※ 질의 및 설문조사서, 업무 프로세스, 시스템 기능 목록 등 －인터뷰 계획 배포(1주일 전) - 설문 및 인터뷰 결과 분석 －설문 및 인터뷰 결과를 정리하여 분석 －설문 및 인터뷰 결과에 대해 보고하고 피드백

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-016
요구사항 명칭		업무 현황분석(BPR)
요구사항 상세설명	세부 내용	-조직 및 업무 프로세스 맵 및 설명서 작성 · 행정업무, 분석지원, 장비활용 등 ※ 조직 및 업무분석 대상 : 2.1 업무 현황 참고 - 인터뷰를 통한 문제점 조사 및 분석 · 정보화 지원/만족도 수준, 기능 (개선, 신규, 유지, 통합, 연계, 자동화, 지능화 등) 고도화 관점 - 업무 시스템 개선 요구사항 도출 및 정의 - 문제점 및 요구사항을 종합하여 시사점 도출

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-017
요구사항 명칭		현황 분석
요구사항 상세설명	세부 내용	- 데이터 현황분석 · 현행 데이터 구조, 데이터 운영현황, 업무간 데이터 공유현황 · 데이터 표준 및 관리(데이터 표준, 표준관리체계, 코드 등) 현황 - 정보시스템 IT 인프라, 정보보안 분석 및 진단 · IT인프라 자원(NW 트래픽, CPU, Memory, Disk) 사용률 분석 · 서버, 디스크, 백업장비, N/W장비 내용연수 등 일반현황 분석 - 인터뷰를 통한 문제점 조사 및 분석 - 우수사례 및 정보기술동향과 GAP 분석 - 문제점 및 요구사항을 종합하여 시사점 도출

요구사항 분류		대상사업 관리	요구사항 번호	CNR-018
요구사항 명칭		목표 업무 프로세스 재정립(BPR)
요구사항 상세설명	세부 내용	- 업무 프로세스별 목표 프로세스 설계 · 통합정보시스템 프로세스를 재정립하고 통합정보시스템을 구축하기 위한 목표업무 프로세스 설계 세분화 · 각 업무별 목표 업무 프로세스 모델 설계 · 목표 업무프로세스 분류체계 및 흐름도(절차) 작성 · 업무 현황분석을 통한 업무 프로세스 정의 및 프로세스 정의서 작성 · 업무 프로세스 단위로 프로세스 책임의 명확화 · 수기 진행 업무 전산화(온라인화) 도출 · 업무현황 분석과 사용자 요구사항을 반영한 업무 프로세스 설계 · 유사·중복 및 비효율적인 프로세스의 통·폐합 · 목표 업무프로세스 분류체계 및 흐름도(절차) 작성 - 업무 요구사항 및 목표 업무 프로세스로부터 정보화 요건 분석 및 기능 도출 · 온라인화, 연계강화, 통합화, 지능화, 자동화 등 관점에서 정보화 기능 요건분석 및 정의 · 업무 프로세스 개선 및 변화(현행 대비 개선사항) 요소 파악 · 업무별 정성 및 정략적 기대효과 도출

2) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리	요구사항 번호	PMR-001
요구사항 명칭		수행전략
요구사항 상세설명	세부 내용	－대상사업에 적용할 PMO사업 추진전략 및 방법론을 제시하고, 방법론에 따른 PMO 수행계획을 제시 －사업범위 및 세부추진내용에 대해 구체적이고 실현가능한 수행방안 제시 －대상사업의 일정지연 등 사업기간의 변경사항 발생시 PMO사업 일정에 대한 대응방안 제시 －대상사업의 특성 및 규모에 적합한 PMO 수행역할 제시

요구사항 분류		프로젝트 관리	요구사항 번호	PMR-002
요구사항 명칭		수행계획
요구사항 상세설명	세부 내용	－사업수행계획서를 제출하여 승인을 받아야 함 －모든 활동에 대한 업무내역･일정계획･수행방안 등을 구체적으로 제시 －정기·수시 보고서, PMO 실적보고서(일정･범위･이슈･위험 관리 등 PMO 수행 결과), 최종 보고서 등 제출(세부 항목은 대한장애인체육회과 협의) －모든 사업 진행사항은 대한장애인체육회와 협의하여 수행하고 수행일정을 성실히 준수 －PMO사업 방법론에 따른 산출물의 종류 및 내역 등 제시

요구사항 분류		프로젝트 관리	요구사항 번호	PMR-003
요구사항 명칭		수행인력구성
요구사항 상세설명	세부 내용	－수행책임자(PM) －제안사 소속의 재직 중인 직원으로서 사업을 총괄할 수 있는 전문인력이어야 하며 정보시스템 구축 기간 동안 상주하여야 함 －공공부문, 클라우드부문, 또는 스포츠 경기 관리 관련 시스템 구축 사업의 기획, 설계, 또는 구축 수행경험이 있는 인력이어야 함 －ISP, 시스템 구축, 또는 PMO 사업 수행책임자(PM) 경험이 최근 3년간 3회 이상인 특급인력이어야 함 －기술지원인력 －공공부문, 클라우드부문, 또는 스포츠 경기 관리 관련 시스템 구축 사업의 기술지원분야 수행경험이 있는 인력이어야 함 －전체 인력투입계획 및 작업 단위별 업무분장내역 제시

요구사항 분류		프로젝트 관리	요구사항 번호	PMR-004
요구사항 명칭		수행인력관리
요구사항 상세설명	세부 내용	－추진조직, 인력구성 및 프로필, 사업단계별･추진일정별 인력투입계획, 역할, 투입공수 등을 제시하여야 하며, 인력투입계획에 명시된 인력은 대한장애인체육회의 동의없이 임의로 변경할 수 없음 －특별한 사유가 없는 한 인력교체는 불가하며, 투입인력에 대한 변경이 불가피할 경우에는 대한장애인체육회의 승인 하에 동급 이상의 대체인력을 최소 2주 전에 투입하여 인수인계를 수행해야 함 －인력 교체기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책을 제시하여야 하며, 인수기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 제안사 부담으로 처리하고 투입공수에서 제외함 －추진조직 외에 사업을 성공적으로 수행할 수 있는 지원 또는 자문 조직을 구성하여 제시할 수 있음 －투입인력 중 근무 태만의 불성실한 자세와 전문기술 미흡 등으로 대한장애인체육회가 부적격자로 판단되어 교체를 요구할 경우 제안사는 보편타당한 반론이 없는한 이에 즉시 응해야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리	요구사항 번호	PMR-005
요구사항 명칭		수행환경
요구사항 상세설명	세부 내용	－효율적이고 체계적인 사업수행을 위해 자동화 도구 활용방안을 제시해야 함 －사업관리, 품질관리 등 사업수행에 필요한 일체의 장비 및 소프트웨어는 제안사가 준비하고 제반 비용을 부담해야 함 －사업수행을 위한 작업장소(사무실)는 대한장애인체육회가 제공하며, 투입되는 모든 인력이 사용할 PC, 모니터, 기타 물품(소모품 포함)은 제안사가 구비(대한장애인체육회의 보안요건을 반드시 준수) －사업수행을 위한 작업장소(사무실)는 추후 협의를 통하여 최종 결정

3) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원	요구사항 번호	PSR-001
요구사항 명칭		기술자문
요구사항 상세설명	세부 내용	－개발·테스트·운영 환경 구축시 시스템보안, 기술 아키텍처, 데이터 아키텍처 및 소프트웨어 아키텍처 등 업무와 관련된 기술지원 수행 －시스템 성능 및 가용성 테스트 점검 항목 검토 및 개선사항에 대한 의견 제시 업무분석 후 정의 시 회계사 등 전문인력의 자문을 하여야 함

4) 제약사항

요구사항 분류		제약사항	요구사항 번호	COR-001
요구사항 명칭		하도급 허용 여부
요구사항 상세설명	세부 내용	－본 사업은 하도급을 불허하는 사업임

5) 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-001
요구사항 명칭		보안지침 준수
요구사항 상세설명	세부 내용	- 사업 전 과정에 걸쳐 생성된 자료 및 결과물에 대해 적정한 정보보안 관리 지침을 준수하여야 한다

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-002
요구사항 명칭		관리적 보안
요구사항 상세설명	세부 내용	- 인적, 물적 자원에 대한 보안정책 및 지침을 수립하여 적용하고, 수시로 보안 진단을 실시함 - 외부 인력을 포함한 사업 수행 인력을 대상으로 주기적인 보안교육 실시 및 보안서약서 작성 등 보안관리를 수행하여야 한다. - 본 사업수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행중은 물론 사업이 완료된 후에도 비밀 보안을 준수하도록 함 - 계약업체는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전후를 막론하고 주관기관의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이를 위반시 향후 법적책임이 있음을 포함한 ‘보안서약서’를 작성하여 제출

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-003
요구사항 명칭		물리적 보안요건
요구사항 상세설명	세부 내용	- 사무실, 주요장비 설치장소에 대한 출입보안 실시 - 개인소유의 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 실시 - 생성된 문서는 별도 시건장치가 된 곳에 안전하게 보관 - 폐기되는 문서는 안전한 방법으로 폐기되도록 함

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-004
요구사항 명칭		기술적 보안요건
요구사항 상세설명	세부 내용	- 사용자 PC 패스워드 사용 및 주기적인 변경 - 사용자 PC 백신 프로그램 최신 상태 유지 - 정기적으로 바이러스 및 해킹 도구 검사

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-005
요구사항 명칭		참여인력 보안서약 및 책임 등
요구사항 상세설명	세부 내용	- 용역사업 자체 또는 투입되는 자료․장비 등에 대한 대외보안이 필요한 경우 보안의 범위 및 책임을 명확히 하기 위해 사업수행 계약서와 별도로 비밀유지계약서를 제출 - 사업 참여인원에 대해, 친필 서명이 들어간 ‘보안서약서’ 제출 - 용역사업 수행 전 참여인원은 발주기관이 실시하는 정보보안 교육 참여

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-006
요구사항 명칭		외부 PC 관리
요구사항 상세설명	세부 내용	- 사업기간 내 사용되는 모든 개발용 PC, 노트북 등 정보화기기의 사용현황을 발주기관에 신고 관리해야 함 - PC는 패스워드를 설정하여야 하고 주기적으로 변경하여야 함 - PC는 정기적으로 바이러스 체크를 하여야 함

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-007
요구사항 명칭		해킹, 바이러스 등 침해사고 예방 대책
요구사항 상세설명	세부 내용	- 해킹, 바이러스 등으로 인한 침해사고 예방대책 및 서비스 중단사태 발생에 대한 긴급복구 방안 등을 포함한 보안대책을 제시해야 함 - 사업기간 중 불법 S/W의 사용으로 인한 문제에 대한 책임을 져야함

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-008
요구사항 명칭		사업관련 자료 보안 방안
요구사항 상세설명	세부 내용	- 사업관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지해야 함

요구사항 분류		보안 요구사항	요구사항 번호	SER-009
요구사항 명칭		문서관리 요건
요구사항 상세설명	세부 내용	- 정보화 사업과 관련한 중요자료 및 비공개자료는 시건장치가 있는 장소에 보관하여야 함 - 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 실시 - 폐기되는 문서는 안전한 방법으로 폐기되도록 함

4. 제안안내사항

가. 입찰방식

1) 사업자 선정 방식

ㅇ ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조 및 제43조의2｣에 의거 “협상에 의한 계약체결” 방법을 적용한다.

ㅇ 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 기획재정부 계약예규 “협상에 의한 계약체결기준”을 적용한다.

2) 입찰참가 자격

ㅇ 본 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 모두 갖춘 사업자 이어야 한다.(➀ ~ ➅번 사항이 모두 충족되어야 함)

① 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 조달청 입찰참가자격 등록증을 소지한 사업자

② ｢소프트웨어 진흥법｣ 제58조 및 동 법 시행규칙 제17조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드:1468)로 등록되어 있는 업체

- 최근년도 결산 신고된 '소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서' 및 '소프트웨어사업 수행 실적 증명서' 제출

③ ｢정보통신공사업법｣ 제14조에 의한 정보통신공사업자[업종코드 0036]로 등록한 자

➃ 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조에 의한 직접생산자확인증명서(“정보시스템개발서비스 8111159901”)를 소지한 업체(제안서 제출 마감전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)

➄ '클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률' 제20조 3항에 따라 과학기술정보통신부에서 운영하는 '디지털서비스 이용지원시스템'에 등록된 '디지털서비스 전문계약업체'

➅ ｢국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률｣제27조 및 동법 시행령 제 76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체

ㅇ 공동수급(공동이행방식)은 불허함

나. 제안서 평가 방법

1) 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

① 평가비율 : 기술평가(90%)*, 가격평가(10%)

* 기술평가는 정성평가(80)와 정량평가(10)로 구성

② 종합평가점수 = 기술평가점수 + 입찰가격 평가점수

③ 평가기관 : 기술평가(수요기관), 가격평가(조달청)

2) 기술평가 방법

① 제안서의 공정한 평가를 위해 전문가로 구성된 기술평가위원회를 구성한다.

② 각 항목별 평가배점과 방법은 『다. 기술성평가기준』에 의한다.

③ 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점(80점) 만점으로 환산하며 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

④ 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

3) 우선협상대상자 선정 및 계약체결

① 협상대상자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상한다.

② 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 재입찰 추진한다.

③ 기타 규정되지 않은 사항은 조달청 규정에 의한다.

다. 기술성 평가 기준

1) 정량적 평가

평가항목

세부평가항목

평가기준

배점

경영상태

신용평가도

｢조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준｣ 별표 8을 적용하여 다음과 같이 평가신용평가 등급에 따라 점수화하여 평가한다.

* 신용등급에 의한 경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용 평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	“ 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	“ 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	“ 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째

자리에서 반올림 함

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사  또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

5

일반부문

참여업체 수행 실적

공공 부문 정보화전략계획 수립(ISP), PMO용역에 대한 참여업체의 수행실적 보유 정도를 평가

o 「조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준」을 적용하여 평가

평가등급	배점
100% 이상	5.0 (100%)
70% 이상～100% 미만	4.5 (90%)
40% 이상～70% 미만	4.0 (80%)
40% 미만	3.5 (70%)

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다.

2. 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.

3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.

4. 실적 인정 범위는 제안요청서에 정하되, 수행실적은 주 5에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.

5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 붙임2의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 붙임3 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함

다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서

라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음

마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당계약을 이행할 출자 또는 분담업체의 실적으로 평가하며 6호의 평가방법에 따라 평가한다.

7. 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전ㆍ분할 전ㆍ사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.

가. 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가

나. 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리ㆍ의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

다. 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

o 실적 인정 범위

- 실적범위 : 최근 3년간 공공·민간 정보화사업의 ISP, PMO 용역 사업

- 실적인정기준 : 용역 실적증명원을 제출하고, 이행완료된 사업에 한하여 평가함

- 실적인정금액 : 실적범위 및 실적인증기준에 해당되는 사업의 합산금액

※ 붙임2, 3을 작성하여 수행실적 총괄표와 수행실적증명서를 제출

5

2) 정성적 평가

평가 부문	평가항목 (배점)		평가기준	배점
정성 평가 (80)	사업 전략 (25점)	사업 이해도	∘ PMO 대상사업의 특성 및 목표, 대한장애인체육회의 요구사항에 대해 이해하고 적절한 방향과 전략이 구체적으로 제시되었는지 평가	10
		수행 내용	∘ 사업수행 단계별 관리업무, 기술지원 업무 등에 대한 사업내용의 구체성 및 실현 가능성을 평가	15
	수행 역량 (25점)	수행 책임자	∘ 규모와 내용이 유사한 공공기관 정보화사업 용역에 대하여 현장의 총괄지휘감독 수행경력의 보유정도를 평가	10
		관리‧기술 지원 인력	∘ 인력 투입계획을 적절히 제시하였는지의 여부 ∘ (관리)전자정부사업에서 총괄·지휘 감독업무를 수행한 경력의 보유 정도를 평가 ∘ (기술)전자정부사업에서 기술업무를 수행한 경력의 보유 정도를 평가	15
	수행 계획 (15점)	수행일정	∘ 사업 수행단계별 관리업무, 기술지원업무 등에 대한 수행일정의 적절성 및 실현가능성을 평가 ∘ 사업의 규모 및 특성을 고려한 단계별 투입인력 계획 등의 적절성을 평가	10
		기타 지원사항	∘ 대한장애인체육회의 사업관리 참여인력에 대한 교육훈련, 전문기술 정보제공, 사업관리 결과의 지식화 등 지원 계획의 적정성 평가	5
	품질 관리 (15점)	품질 및 성과관리	∘ 위탁용역의 품질향상을 위한 품질 관리방안의 적절성을 평가 ∘ 위탁대상사업의 품질향상을 위한 품질관리 지원방안의 적절성을 평가 ∘ 위탁대상사업의 성과달성을 위한 지원방안의 적절성을 평가	10
		지원체계	∘ 사업수행조직을 지원하기 위한 본사의 지원인력, 경험‧ 지식 보유 등 지원 체계의 적절성을 평가	5
합 계				80

라. 제안서 작성지침 및 유의사항(권장사항)

ㅇ 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있습니다.

ㅇ 제안서의 구성은 “3. 제안서 목차”에서 명시한 순서에 따라 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 알 수 있도록 참조표를 제시하여야 합니다.

ㅇ A4지 3hole 바인더 사용을 권고합니다.

- 제안서 본문 내용은 100페이지(50장) 이내로 작성 권고

- 양면 및 단색으로 인쇄 권고

- 양장제본, 제안 설명 시 홍보용 동영상활용 금지

ㅇ 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있습니다.

ㅇ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여합니다.

ㅇ 제안서는 한글, MS워드, 파워포인트로 작성하며, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어표를 제공해야 합니다.

ㅇ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 합니다.

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현. 예를 들어, “사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 합니다.

ㅇ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사가 부담합니다.

ㅇ 제안사는 본 제안관련 업무를 수행하면서 취득한 정보에 대해서는 비밀을 유지하여야 합니다.

ㅇ 제안요약서는 제안 설명(PT)이 용이하도록 가로형태로 작성하여야 합니다.(제출된 제안 요약서 내용대로 PT해야 하며, 제안 발표 당일 변경할 수 없습니다.)

마. 제안서 목차

Ⅰ. 제안개요

1. 제안의 배경 및 목적

2. 제안 범위

3. 제안의 특ㆍ장점

4. 기대효과

Ⅱ. 일반현황

1. 일반현황

2. 조직 및 인원

3. 주요 사업내용

4. 주요 사업실적(참여인력 실적 포함)

Ⅲ. 사업수행

1. 대상사업의 대한 이해

2. 추진 전략

3. 과제별 세부 수행계획

Ⅳ. 사업관리

1. 추진 일정계획

2. 수행조직 및 업무분장

3. 투입인력 및 이력사항

4. 품질보증계획

Ⅴ. 기타

1. 사후 지원사항

2. 기타사항

바. 세부 작성 지침

작 성 항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 제안개요	제안업체는 본 사업의 제안내용을 명확하게 이해하고, 본 제안의 목적, 범위 및 제안의 특ㆍ장점을 요약하여 기술하여야 한다.
Ⅱ. 일반현황
1. 일반현황	제안업체는 일반현황 및 주요연혁, 최근 3년간 자본금 및 부문별 매출액 등을 명료하게 제시하여야 한다.
2. 조직 및 인원	제안업체의 조직 및 보유인력 현황을 제시하여야 한다.
3. 주요 사업내용	제안업체의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시하여야 한다.
4. 주요 사업실적	최근 3년 이내에 본사업과 관련이 있는 사업을 수행한 회사 또는 참여인력의 실적을 제시하여야 한다.
Ⅲ. 사업수행
1. 사업에 대한 이해	본 사업에서 요구하는 바를 개념도, 구성도 등을 활용하여 구체적으로 기술하여야 한다.
2. 추진 전략	과제를 성공적으로 수행하기 위한 방법론 등 추진 전략을 기술하여야 한다.
3. 세부 수행계획	과제에 대한 수행계획을 구체적으로 제시하여야 한다.
Ⅳ. 사업관리
1. 추진 일정계획	사업기간 내 과제를 수행완료 할 수 있음을 기술하여야 한다.
2. 업무분장	본 사업을 수행할 제안업체 인력, 협력업체의 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다.
3. 투입인력 이력	인력투입 계획을 주요일정별로 제시하고, 투입인력의 개인별 프로젝트 수행실적을 본 사업과 유사한 업무 및 기본환경을 중심으로 구체적으로 작성하여야 하며 인력의 자격 및 이력 사항을 첨부하여야 한다.
4. 품질보증계획	사업 산출물의 품질보증을 위해 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시하여야 한다.
Ⅴ. 기타
1. 사후 지원사항	본사업의 목표 및 과제 내용을 참고하여 제안업체에서 사후 지원하고자 하는 사항을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 기타사항	제안업체가 사업과 관련되어 추가 제안할 내용을 기술한다.

사. 제안서 제출 일정 및 방법

ㅇ 제출기한 및 제출방법 : “입찰공고문” 참조

ㅇ 문의처 : 대한장애인체육회 경영지원부 김진석 과장(02-3434-4540)

ㅇ 제출종류 및 부수

① 입찰참가자격 관련 확인 서류 각 1부(24쪽, 1~6번 서류)

② 법인 등기부등본(개인사업자인 경우 사업자등록증) 1부

③ 소프트웨어사업자신고확인서 1부

④ 제안서(첨부자료 포함) 9부 *정성적 제안서와 정량적 제안서는 반드시 분리

➄ 제안요약서(제안서 설명회 발표자료) 9부

➅ PPT 발표 파일(USB로 제출/ 폰트 파일도 동봉)

➆ 제안서 비교평가를 위한 조견표 제출

조견표 제출 : 입찰서류 제출시까지

제안서 비교평가를 위해 제안서 목차, 평가항목별 조견표를 가급적 상기 등록기한 내 제출

- 만일 조견표를 미제출 시에는 비교평가가 불가하여 평가에 불이익

아. 제안설명회 개최

ㅇ 제안설명회 일정 및 장소는 제안서 접수 후, 제안사별로 별도 통보

※ 제안설명회 미참석에 따른 불이익은 제안사가 감수하여야 함

ㅇ 유의사항

- 제안 설명회를 개최하는 경우 제안 설명은 제안사(주사업자)의 사업관리자(PM)가 직접 발표 하여야 하며, PM이 발표하지 않을 경우 발표 없이 제안서에 대한 서면평가로만 진행합니다. 발표 내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기한다.

- 사업관리자(PM)는 대표자 소속 임직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서 평가일 까지 계속 재직 중인 자이어야 한다.

자. 입찰 시 유의사항

ㅇ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

ㅇ 낙찰자로 결정된 이후에 참여 구성원을 변경할 수 없다.

ㅇ 제안서 인력은 자사인력으로 구성하여야 한다.

ㅇ 입찰공고문, 제안안내서, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어 진흥법, 기획재정부 계약예규, 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주사의 계약 요령에 따른다.

ㅇ 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있다.

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 시행규칙 제14조 규정, 용역입찰유의서 제 12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 한다.

ㅇ  입찰자는 발주사로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 가료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

차. 제안서 보상

ㅇ 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안사의 부담으로 한다

ㅇ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」제52조에 의거, 제안서 보상을 실시하지 않는다.

카. 기타사항

ㅇ 공동활용 여부

- 본 사업의 결과 산출물은 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음

ㅇ 과업심의위원회

- (과업내용 확정 심의 여부) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (  )개최 또는 ( v )미개최 한 사업임

- (과업내용 변경) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호서식 참조

ㅇ 적정 사업기간 산정

- 해당사항 없음

ㅇ 소프트웨어사업 영향평가 결과서

- 해당사항 없음

ㅇ 차등점수제 미적용

- 본 사업은 “소프트웨어 기술성 평가기준 지침”제4조제5항에 따른 차등점수제를 미적용한 사업임

붙임 1		입찰 관련 제출 서류

구 분		항 목	제출서류 및 작성지침	비 고
입찰참가 등록서류 (1부 별도작성 제출)		입찰공고에 의 함	입찰(제안) 참가신청서 1부	서식1
			개인정보 수집 및 이용 동의서	서식2
			사업자등록증 사본 1부 (원본대조필 명기 후 인감으로 날인)	-
			법인등기부등본 1부(법인인 경우)	-
			인감증명서 1부(법인인 경우 법인인감)	-
			사용인감계 1부(인감도장 지참)	서식3
			위임장 및 재직증명서 1부(대리인이 등록할 경우) ☞ 위임장은 서식1에 포함	-
			중소기업등록확인서 1부	-
			경쟁입찰참가자격등록증 1부
			직접생산확인증명서 1부
		기 타	서약서 1부	서식4
			보안각서 1부	서식5
			확인서(입찰참가자격제한 및 징계사항) 1부	서식6
			입찰보증금 지급각서 1부	서식7
			청렴계약이행서약서 1부	서식8
			인권보호·존중 이행 서약서 1부	서식14
			세부산출내역서 1부	자유양식
			기타 입찰참가자격과 연계된 면허 등 서류	-
제안서	사업수행 능력평가서 (1부 별도작성 제출)	공 문	제안서 제출 공문 ※ 대표자 인감이 날인된 공문에 의해 제출 되어야 하며 날인이 없는 경우 제안으로 인정하지 아니함	-
		표 지	사업수행능력평가서 표지	서식9
		사업수행능력	일반현황 및 연혁 1부	서식10
			최근 3년간 유사용역 수행실적 1부	서식11
			참여인력현황 1부 ※ 4대 보험 증명서 첨부	서식12
			인력투입 계획	서식15
			투입인력 현황	서식16
			신용평가등급확인서
		실적증명서	실적증명서 1부 ※ 최근 3년간 실적 ※ 발주기관이 발급(3개월 이내)한 실적증명서	서식13
	사업계획서 7부	사업계획서 (제안서)	제안서 작성(안)에 따라 작성 ※ 원본 1부 및 사본 6부 및 발표자료 포함된 USB ※ 업체명 기재는 원본에만 표기	-

[서식 제1호]

입찰참가 신청서
신 청 인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰건명
입 찰 보증금	“입찰보증금 지급확약서”제출로 갈음(서식 제6호)
대 리 인 ㆍ 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. ㆍ성 명 : ㆍ주민등록번호 :			본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : (인)
본인은 귀 실에서 공고한 입찰에 참가하고자 귀 부에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. “입찰서류 목록 표기” 2. 3. 4. 20 년 월 일 신청인 (인감증명서상 인감날인) 대한장애인체육회장 귀하

[서식 제2호]

개인정보보호 수집 및 활용 동의서

1. 대한장애인체육회의 개인정보 수집 및 이용 (동의 필수)

[수집하는 개인정보의 항목]

가. 대한장애인체육회는 아래와 같은 내용으로 개인정보를 수집하고자 합니다.

- 항목 : 성명, 소속, 직위, 주민등록번호, 성별, 연락처, 주소, 학력 및 경력사항 등

[개인정보 수집 목적]

대한장애인체육회는 다음과 같은 이유로 개인정보를 수집합니다.

- 입찰참가에 따른 본인확인 및 대리인 확인 용도

[개인정보 보유기간]

가. 입찰참가에 관한 정보제공의 필요 종결시까지 보유

[개인정보 수집 동의 거부의 권리]

가. 입찰참가 시 개인정보를 제공하고자 하는 자는 개인정보 활용 동의를 거부할 권리가

있으며, 거부할 경우 입찰참가가 제한될 수 있음을 알려 드립니다.

개인정보의 수집 및 이용목적에 동의하십니까?	□ 동의함	□ 동의하지 않음

2. 대한장애인체육회의 고유식별정보 수집 동의 (동의 필수)

대한장애인체육회는 아래의 내용으로 고유식별정보를 수집합니다.

1. 목적: 입찰참가에 따른 본인 및 대리인 확인 자료 활용

2. 항목: 인사기록카드, 4대보험 가입, 각종 증명서 발급, 정보보안 서약서 징구 등

3. 기간 : 입찰참가에 관한 정보제공의 필요 종결시까지 보유

4. 고유식별정보 수집에 동의하지 않을 권리가 있으며, 미동의시 입찰참가 및 이에 관한

자격이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

고유식별정보 제공에 동의하십니까?	□ 동의함	□ 동의하지 않음

2024년    월    일

상호 :                    대표자 성명 :           (인)

[서식 제3호]

사 용 인 감 계

당사(기관)는 대한장애인체육회 ㅇㅇㅇ 용역 계약서 작성에 사용할 인감을 아래와 같이 확인합니다.

사용인감	법인인감

20    년    월     일

주 소 :

상 호 :

성 명 :

[서식 제4호]

서   약   서

업 체 명  :

주    소  :

대한장애인체육회 ㅇㅇㅇ 용역 제안서 제출과 관련하여 다음과 같이 제반사항을 준수할 것을 서약 합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위기재사항 등이 확인될 경우와 신청자격에 해당되지 않을 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 귀 시가 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

20    년   월   일

대표자	성명               (서명) 또는 (인)

[서식 제5호]

보안 서약서

「대한장애인체육회 차세대 통합관리시스템 구축 사업 PMO 용역과 관련, 사업수행 중 투입되는 모든 인력에 대하여 다음의 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

ㅇ 업무 수행상 보안에 위반된다고 생각하는 사항을 외부에 누설함은 대한장애인체육회 및 국가에 대한 이적행위가 됨을 자각하고 보안업무의 제 규정을 시간과 장소에 관계없이 성실히 이행하겠음.

ㅇ 사업 중 알게 된 모든 보안사항을 사업 종료 후에도 일체 누설하지 않겠음.

ㅇ 대한장애인체육회의 보안정책을 위반하는 경우 처리 기준에 따른 처벌 및 민ㆍ형사상의 처벌을 감수하겠음.

2024년    월    일

상  호 :

대표자 :

대한장애인체육회장 귀하

[서식 제6호]

확      인      서

(입찰참가자격제한 및 징계사항)

본 기관(연구기관ㆍ공익법인ㆍ교육기관ㆍ학술용역기관, 기업 등)은 최근 3년간 관계법령에 의거 입찰참가제한 등 관계기관으로부터 징계 받은 사실이 없음을 확약하며, 계약체결 후라도 만약 위 사실에 대한 위배내용이 확인될 시 계약해지 및 이에 따른 불이익 사항에 대한 책임은 본 기관(연구기관ㆍ공익법인ㆍ교육기관ㆍ학술용역기관,기업 등)에 있음을 확인합니다.

20     년    월     일

기 관 명 :

주    소 :

대 표 자 :                 (인)

[서식 제7호]

입찰보증금 지급각서

1. 사 업 명 :

2. 입찰보증금액 : 일금           원정(₩          )

※ 입찰금의 5% 이상

상기와 같이 입찰에 참가함에 있어 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제37조의 규정에 의거 면제하며, 세입조치사유가 발생하였을 시에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.

20     년    월    일

주  소 :

상  호 :

성  명 :                      (인)

[서식 제8호]

청렴계약이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 귀회에서 시행하는  ○○○○○ 용역에 참여함에 있어 당사 임직원은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 귀회에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년동안 입찰에 참가하지 않겠으며 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 귀회에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년동안 참여하지 않고 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직ㆍ간접적으로 금품ㆍ향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 귀회에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 귀회에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년동안 참가하지 않고  입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 귀회에서 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 착공(수)전에는 계약취소, 착공(수)이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임ㆍ직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 귀회 등에서 시행하는 청렴계약 옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 귀회의 조치와 관련하여 당사가 귀회를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민ㆍ형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20   .    .    .

서약자

주  소 :

상  호 :

대표자 :            (인)

[서식 제9호]

접수번호

사업수행능력 평가서

20   .     .

○○○○ ㈜

[서식 제10호]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ∼ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁
주요사업내용
생산시설 및 생산인원

작성일 : 20   .    .    .

작성자 : (이름)                      □

(소속 및 직위)

[서식 제11호]

유 사 분 야 사 업 실 적

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

작성일 : 20  .   .   .

작성자 : (이름)                      □

(소속 및 직위)

※ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유관한 것만 기재

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사를 기재

※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

※ 비고에는 사용 개발방법론을 이용했을 때 기재한다.

[서식 제12호]

참여인력 이력사항

성 명	□			소 속
직 책				연 령
학 력	대학교 전공			해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공			자 격 증
본사업 참여임무			사업참여기간			참여율	%

경 력
사 업 명	참여기간	담당업무	발주처	비고

※ 대한장애인체육회의 요청시 참여인력 이력사항에 대한 각종 증빙서류(졸업증명서, 소득세 원천징수영수증, 경력증명서, 상장 등)를 제출하여야 함

[서식 제13호]

실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)						대표자
	영업소재지						전화번호
	사업자번호						제출처			대한장애인체육회
	증명서용도
	용역범위 (금액 포함)
용역이행 실적내용	용역명								구분
	용역개요
	계약번호	계약일자		계약기간	규모			이행실적		비고
								비율	실적
증명서 발급기관	기관명 : (인) (전화번호: )
	주 소 : (Fax번호: )
	발급부서 :					담당자 :
	위 사실을 증명함 20 년 월 일 [직인]

※ 민간거래실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부하여야 함

※ 실적 및 금액부분엔 투명테이프로 부착

※ 발주기관이 발급(3개월 이내)한 실적증명서

[서식 제14호]

인권보호·존중 이행 서약서(계약상대자)

당사(계약상대자)는 사람을 먼저 생각하는 인권경영과 차별 없는 사회구현을 지향하고, 대한장애인체육회와 사업(업무) 이행 과정에서 발생하는 모든 경영활동 과정에서 인간의 존엄과 가치 향상을 위하여 노력하며, 임직원·지역사회 등에 대한 인권 존중의 책무를 준수하기 위해

대한장애인체육회에서 시행하는 ㅇㅇㅇㅇㅇ 용역에 참여할 때 당사(계약상대자)의 임직원과 대리인은 아래와 같이 인권경영을 선언하고, 그 실천을 다짐한다.

◦ 인권, 노동, 환경, 반부패 등의 가치에 관한 대한민국 헌법 및 국제 인권규범을 존중하고 지지한다.

◦ 사업(업무) 이행 과정에서 차별과 편견 없는 현장을 만들기 위해 노력한다.

◦ 중대재해 사고, 직장 내 괴롭힘이 발생하지 않도록 당사 차원에서 적극적으로 점검하고 예방활동을 실시한다.

◦ 임직원을 포함한 모든 이해관계자에 대하여 인종, 종교, 장애, 성별, 출생지, 정치적 견해 등을 이유로 차별하지 않는다.

◦ 어떠한 형태의 강제노동과 아동노동을 허용하지 않는다.

◦ 안전하고 위생적인 환경을 제공하여 안전 및 건강권을 보장한다.

◦ 인간의 존엄과 가치에 대한 존중 결여, 인권 침해적 활동을 행하는 단체 및 개인과는 어떠한 거래나 협력도 하지 않는다.

◦ 국내외 환경 관련 법규를 준수하고, 환경보호와 환경재해 예방을 위해 노력한다.

◦ 사업(업무) 이행 과정에서 국민의 안전에 위해가 되지 않도록 노력하고, 업무상 수집한 개인정보를 보호한다.

◦ 사업(업무) 이행 과정에서 발생하는 인권침해에 대해 신속하고 적절한 구제조치를 제공한다.

위 인권경영 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 본 서약내용을 그대로 이행하고, 이를 어길 시, 대한장애인체육회의 조치와 관련하여 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20   .    .    .

서약자

주  소 :

상  호 :

대표자 :               (인)

[서식 제15호]

인력투입 계획

□ 업무별 인력

업 무 명	인원수	기술 등급별
		특급	고급	중급	초급
	명
	명
	명
	명
합 계	명

□ 소속사별 인력

구 분		주사업자	협 력 업 체					합 계
			A사	B사	C사	D사	E사
인원(명)
기술 등급	특급
	고급
	중급
	초급
비중(%)								100.0

□ 관련분야 프로젝트 수행경험

구 분	2년미만	5년미만	7년미만	10년미만	10년이상	합 계
인원(명)
비중(%)						100.0

주) 투입인력은 대상시스템 개발에 직접 참여하였거나, 유사프로젝트 개발 경험이 있는 전문기술인력이어야 함

[서식 제16호]

투입인력 현황

구분	분야별	성 명	연령 (세)	기술등급	본 사업 참여직책	상주여부	담당 업무	투입 개월수
전담 참여	사업책임자
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
비전담 참여	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문

* 경력구분은 ‘투입인력 이력서(예시)’의 직급과 동일하게 작성할 것

* 투입공수 및 투입기간은 해당 월에 1 혹은 0.5 등 MM를 표시할 것

* 사업 기간 중 투입인력 변경은 불가하며, 대한장애인체육회에서 요구 시 재직증명서외 고용보험 및 기타 보험가입여부 자료 제출

[별지]

누출금지 정보 목록

① 대한장애인체육회 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황

② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

④ 전산시스템 취약점분석․평가 결과물

⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

⑥ 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

⑦ 침입차단시스템․침입방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서

⑨ ‘개인정보 보호법’ 제2조 제1호의 개인정보

⑩ ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비

⑪ 기타 대한장애인체육회이 공개가 불가하다고 판단한 자료