과 업 지 시 서

- 국립민속박물관 커피 특별전 전시연출 용역 -

2024. 5.

구 분	직 책	소 속	성 명	연락처	기 타
사업책임자	학예연구관	전시운영과	위 철	02-3704-3152	como@korea.kr
사업실무자	학예연구사	전시운영과	오아란	02-3704-3155	oar0225@korea.kr

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 국립민속박물관 커피 특별전 전시연출 용역

나. 위    치 : 서울시 종로구 삼청로 37 국립민속박물관 기획전시실 2(약 203㎡)

다. 사업기간 : 계약일로부터 2024.8.20.(화)까지

1) 전시물 제작․설치 완료: 계약일 ~ 2024.8.20.

2) 철거 및 원상복구: 전시 종료일(2024.11.10.) 이후

라. 사업범위

1) 전시 기획 및 시나리오에 따른 전시연출 기본․실시설계(4대 보험 및 안전관리비 내역 포함)

2) 전시연출을 위한 구조물 제작 설치(기존 구조물 철거 및 폐기 포함)

3) 전시 진열장, 받침대, 보조대 및 기타 전시 보조물 제작 설치(전시장 내․외부 포함)

4) 전시 내․외부 그래픽 제작 설치(패널, 설명카드, 이미지 그래픽, 사인물 등)

5) 전시 연출 보조 매체(영상․체험물․모형․촉각전시물 등) 제작 설치

6) 모형 및 미디어 시설 설치 및 이를 위한 전기 설비 및 기기 구입(필요시)

7) 전기 및 소방, 조명 등 관련 설비 설치(천정 트랙을 제외한 진열장 및 연출코너)

8) 전시 종료 후 철거 및 원상 복구

9) 기타 사업에 수반되는 행정 소요 및 우리관 요구사항

마. 진행일정

1) 사업 발주 및 계약 :□24.5.

2) 기획 및 실시설계 : 착수일 ~□24.7. ※ 설계도서 및 원가내역산출

3) 전시물 제작․설치 :□24.7. ~ 8.12. ※ 8.13.까지 준공청소 및 유물반입 환경 마련

4) 전시품 디스플레이 :□24.8.14. ~ 8.16.

5) 전시실 시험운영 및 최종 점검 :□24.8.16. ~ 8.19.

6) 전시개막(조성완료) :□24.8.19.

7) 준공서류 및 납품서류 제출 : ~□24.8.20.

8) 전시물 철거: 발주처와 협의하여 전시종료 철거 협의(□24.11. 예정)

※ 전시품 디스플레이 기간 전까지 전시품 반입이 가능한 환경 마련 필수(그래픽 및 영상 세팅을 제외한 준공청소 포함 거의 모든 공정 완료)

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 전시 철거 시 까지

2. 과업 수행 세부지침

가. 과업 수행 계획서 제출

과업수행자는 계약일을 착수일로 하고 과업을 수행해야 하며,

과업 착수 후 5일 이내 과업수행계획서(착수계)를 제출해야 함

나. 과업 수행 방법

1) 일반사항

◦ 과업 수행에 따른 일정 및 방법 등에 대해 발주처와 사전협의한다.

◦ 본 과업내용서 및 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 상호 협의해 결정한다.

2) 보안사항

◦ 과업 수행 책임자는 과업 수행에 따른 자료 등이 타 용도에 임의로 사용되거나 외부로 유출되지 않도록 보안대책을 강구해야 한다.

◦ 기타 보안 관련 사항은 국립민속박물관의 ‘보안업무규정’을 준수해야 하며, 과업 수행 대표자는 보안각서(별첨)를 제출하되 반드시 자필로 서명해야 한다. ※ 별첨 서류는 제안서 제출 시 첨부

3) 세부지침

◦ 실시설계

(1) 실시설계는 발주처와 협의해 기본설계안 확정 후 진행하며, 설계도서 및 내역 산출은 발주처가 제공하는 일정에 따라 제출 후 승인을 득한다.

(2) 반영될 재료 및 특수 재료에 대해서는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정 기준 이상의 우수 재료를 선택해야 한다.

(3) 도면 작성은 CAD 작업을 원칙으로 하며 PDF본을 함께 첨부한다. 또한 그래픽 작업 시 이미지 파일도 함께 작성 첨부한다. 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의해 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

(4) 내역 작성 시, 인건비는 시중노임단가를, 자재 및 재료비는 조달청 발행 가격 정보 최근호에 의하되 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용한다. 그 외의 미수록 단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용한다.(공인된 원가계산 기관의 원가계산도 가능함)

◦ 제작설치

(1) 현장 공사 전 반드시 바닥 및 환․배기구의 보양 작업을 실시하며, 소화기 및 안전모 등 현장 안전장비를 구비해야 한다. 용접 등 화기취급 작업 필요시는 화기 취급 작업 허가서를 사전 요청 발급받은 후 진행한다.

(2) 공사는 가능한 사전 공장제작 후 현장 조립방식으로 현장을 운영해 관람시간 내 소음 및 도색에 의한 민원이 최소화되도록 한다.

(3) 유물 보존 및 관람환경을 고려해 전시 자재는 친환경 자재를 사용하며, 진열장에 설치되는 유리는 파손 시 비산되지 않도록 안전필름을 부착하거나 접합유리를 사용한다.

(4) 지정 코너의 진열장은 일회용이 아닌 작업자의 섭외 없이 개폐가 가능한 형태의 진열장으로 제작하며 사전에 수량, 사양과 세부 제작 사양에 대해서는 담당자와 사전 협의한다.

(5) 기타 제작․설치 중 발생하는 문제 및 수정․변경 사항은 발주처와 협의해 결정한다.

◦ 전시물 보완: 전시 개막 후 제작․설치 하자로 인한 보수 보완 필요 시 발주처와 협의해 조치한다.

◦ 철거 및 원상복구: 전시 종료일 이후 발주처와 일정을 협의해 전시 구조물의 철거 및 폐기를 진행하며 전시실은 원 상태로 복구해야 한다.

다. 성과품 납품

◦ 과업 완료 후 과업 성과품으로 최종 도면(CAD 및 PDF 변환본), 준공계, 준공 사진대장 등의 자료를 기일 내에 납품하되, 모든 성과품은 발주처와 협의해 승인을 득한 후 최종 납품한다.

※ 납품도서 목록

구분	규격	부수	비고
설계도면	A3	2
각종 계산서	A4	2	필요 시
내역서	A4	2
일위대가	A4	2
수량 산출서	A4	2
단가 조사서	A4	2
시방서	A4	2

<서식 1>

보  안  각  서

본인은 2024년   월   일 귀 관과 계약 체결한 [국립민속박물관 커피 특별전 전시연출 용역]을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 사업을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을  철저히 이행할 것임은 물론 사업수행 전에 참여자 전원에 대해 보안교육을 실시한 후에 사업을 시행한다.

2. 본인은 물론 수행 업체 직원이 보안 사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안 관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 계약의 취소, 부정당업자 입찰참가 자격 제한 등 어떠한 제재 조치를 취해도 이의를 제기하지 않을 것입니다.

2024년     월     일

소  속 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

(계약서 사용 인장을 사용할 것)

국립민속박물관 재무관  귀하